특  수  공  시

번호	사 업 명
1	둔철 생태숲 조성사업
2	가축분뇨공공처리시설 증설사업
3	생초면복지회관 건립사업
4	산청따라하동길 조성사업
5	시천생활체육시설 조성사업
6	한방약초체험테마공원 조성사업
7	유림독립운동기념관 건립

1. 둔철 생태숲 조성사업

실 태		각종 인위적 자연적 위해로부터 생태계의 교란과 훼손이 진행되고 있음

추진방향		자생식물자원의 현지 내 보전기능강화 및 자연학습, 산림문화 공간 제공하고자 함

사 업 개 요

위    치 : 산청군 신안면 안봉리 산19번지 외 6필

사업기간 : 2007 ~ 2014

사업규모 : 62ha

사 업 비 : 50억원(국25, 도7.5, 군17.5)

주요시설 : 방문자센터, 피크닉장, 잔디광장, 탐방로 등

사업진행 현황

도 투융자사업 심의 : 2006. 10. 25

문화재 지표조사 실시 : 2007. 4. 25 ~ 2007. 5. 24

기본계획 및 실시설계 : 2007. 4. 13 ~ 2008. 4. 12

사전환경성검토 협의 : 2008. 6 ~ 2008. 9. 8

경남도 사업계획 승인 : 2008. 11. 4

경상남도 계약심사완료 : 2008. 11. 27

공사진행(2009년분 1단계) : 2009. 1. 8 ~ 2009. 9. 8

공사진행(2010년분 2단계) : 2010. 3. 30 ~ 2010. 8. 26

공사진행(2011년분 3단계) : 2011. 1. 31 ~ 2011. 9. 30

공사진행(2011년분 4단계) : 2011. 11. 24 ~ 2012. 1. 22

공사진행(2012년분 5단계) : 2012. 3. 8 ~ 2012. 10. 3

공사진행(2013년분 6단계) : 2013. 2. 20 ~ 2014. 8. 30

기대효과

둔철생태숲 조성에 따른 숲생태 관찰 및 체험의 기회 제공

조  감  도 (배 치 도)

2. 가축분뇨공공처리시설 증설사업

추진방향		가축분뇨 해양배출 금지에 따른 공공처리시설 증설을 통해 가축분뇨의 안정적인 수거처리 도모

사 업 개 요

위    치 : 산청군 산청읍 산청대로 1381번길 146

사업기간 : 2012년 ~ 2013년

사업규모 : 시설용량 50톤/일

사 업 비 : 9,413백만원(국비 7,129/ 군비 2,284)

사업진행 현황

2010. 3월 : 타당성조사 용역

2011. 4월 ~ 9월 : 기본 및 실시설계용역

2011. 7월 : 공공처리시설 설치승인(경상남도)

2011. 11월 : 하천구역 변경협의(국토관리청)

2011. 12월 : 공사계약심사(경상남도)

2012. 3월 : 토목,건축,기계(1차분) 공사 발주

2012. 3월 : 전면책임감리용역 발주

2012. 4월 : 전기ㆍ계측제어설비 공사 발주

2012. 6월 : 토목,건축,기계(2차분) 공사 발주

2012. 6월 : 정보통신공사 발주

2013. 2월 : 토목,건축,기계(3차분) 공사 발주

2013. 5월 : 공사완료 및 시운전개시

2013. 8월 : 총괄 준공

위  치  도

기존가축분뇨공공처리장

사업 대상지

증설가축분뇨처리장

준공완료 전경사진

3. 생초면복지회관 건립사업

목적		◦생초면민의 오랜 숙원인 복지회관 신축지내 목욕탕 설치로 주민편의 도모 ◦산청FC, 축구장 등 주변시설과 연계 시너지 효과가 높은 복합적이며 실용적인 복지회관 신축

사 업 개 요

위    치 : 산청군 생초면 산수로 1030-40

사업기간 : 2013. 5 ~ 2014. 3

사업규모 : 신축 1동 [793.94 ㎡ (지하 1층 / 지상 3층)]

사 업 비 : 1,900백만원(도비 1,000, 군비 900)

주요시설 : 목욕장, 숙박동(다용도실), 기계실 등

사업진행 현황

2012. 11월 : 기본 실시설계 용역 변경 시행

2013. 3월 : 설계변경 용역 시행

2014. 2월 : 신축 건물 준공

2014. 2월 : 복지회관 관리 ·운영 해당 읍면 위임

(읍면 복지회관 설치 및 관리운영 조례)

향후 추진계획

산청FC 등 주변여건과 연계 시너지 효과가 높은 복합적이고 실용적인        복지회관 운영

조  감  도 (배 치 도)

생초면복지회관 건립

(지하1층/지상3층)

준공 전경사진

4. 산청따라하동길 조성사업

추진방향		폐천부지 일대를 생태공간으로 조성하여 산청을 찾는 관광객들에게 안정적인 휴식공간 제공과 청정 산청 이미지 제고

사 업 개 요

위    치 : 산청군 단성면 창촌리 834-25번지 일원

사업기간 : 2013 ~ 2015

사업규모 : 수변공원조성 70,000㎡, 길조성 4㎞

사 업 비 : 2,270백만원(국비 1,971, 군비 299)

주요시설

- 1섹터 : 잔디광장 및 다목적광장조성 (A=21,557㎡)

- 2섹터 : 다목적캠핑장 및 숲조성 (A=50,323㎡)

사업진행 현황

2013. 12월 : 1섹터 기반조성 공사 착공

2014. 3월 : 산청따라하동길 실시설계용역 착수(캠핑장부)

2014. 4월 : 1섹터 기반조성공사 완료

2014. 9월 : 공사 착수(2섹터)

2015. 4월 : 공사 완료 예정(2섹터)

2015. 5월 : 운영관리방안 및 마케팅 추진

사업진행 현황

폐천부지 일원을 캠핑장 조성으로 새로운 연계협력사업 모델 개발 및      지리산 일대를 찾는 도시민 등의 탐방객 분산으로 자연자원 보존 기여

캠핑장 등 운영으로 지역경제활성화 및 주민소득증대 기여

조  감  도 (배 치 도)

준공 전경사진

5. 시천생활체육시설 조성사업

실 태		관내 생활체육 공간부족으로 균등한 체육활동 기회가 없음

추진방향		누구나 손쉽게 접근할 수 있는 다양한 기능의 생활체육공원 조성으로 건전 문화정착 및 지역경제활성화 기여

사 업 개 요

위    치 : 산청군 시천면 천평리 576-1번지 일원

사업기간 : 2010 ~ 2015

사업규모 : 체육시설조성 23,857㎡

사 업 비 : 4,500백만원(국비 1,300, 도비 585,  군비 2,615)

주요시설

- 체육시설 : 축구장, 풋살경기장, 게이트볼장, 테니스장

- 편익시설 : 관리실, 화장실, 간이체육시설, 주차장 등

사업진행 현황

2010. 11월 : 투융자심사, 공유재산관리계획 승인

2012 ~ 2013. 12월 : 군관리계획변경 용역

2014. 6월 : 1차분 공사 착수

2014. 12월 : 1차분 공사 준공

2015. 1월 ~ 2015. 7월 : 2차분 공사 착수 및 준공

기대효과

지역별 균형적인 체육산업 육성으로 건전한 사회분위기 조성

군민들의 건강증진 도모 및 지역경제활성화 기여

조  감  도 (배 치 도)

준공 전경사진

6. 한방약초체험테마공원 조성사업

실 태		지리산권 특산․약용식물 자원의 체계적인 보전․증식 기반 마련

추진방향		한방약초산업 인프라 구축을 통한 대외경쟁력 확보로 한방 의료관광 활성화 및 지역주민소득 증대에 기여코자 함.

사 업 개 요

위    치 : 산청군 금서면 특리 동의보감촌 일원

사업기간 : 2012 ~ 2015

사업규모 : 테마공원조성 8,500㎡, 유리온실 1동, 관람로 조성 1,000m, 풍차설치 1식

사 업 비 : 8,000백만원(국비 4,000백만원, 군비 4,000백만원)

주요시설 : 유리온실, 테마공원, 수생약용식물원, 풍차, 각종 편의시설 등

사업진행 현황

기본계획 및 실시설계용역 : 2012. 1월 ~ 2012. 12월

테마공원 부지 확보 및 기반조성 : 2012. 1월 ~ 2012. 12월

테마공원 산책로 조성 및 초화류(약초)식재 : 2012. 4월 ~ 2013. 6월

테마공원 사슴사육장 설치공사 완료 : 2012. 3월 ~ 2012. 6월

유리온실 신축 및 내·외부 조경완료 : 2012. 12월 ~ 2013. 7월

테마공원 및 유리온실 주변 편의시설(쉼터 등) 설치 완료 : 2013. 7월

테마공원 풍차설치공사 완료 : 2013. 8월

테마공원 내 초화류 식재 : 2014. 4월 ~ 2014. 9월

테마공원 편의시설 신축공사 : 2014. 6월 ~ 2014.9월

기대효과

한방약초체험테마공원 내 약용식물원 등을 통한 생태환경․자연학습․ 건강

정보의 장으로 자리매김

한방약초산업과 농촌테마 관광산업 클러스터 구축으로 미래지향적인

농업도시의 모델제시 및 시너지효과 극대화

유리온실 전경사진

테마공원 전경사진

7. 유림독립운동기념관 건립

실 태		독립운동 정신의 계승으로 민족자존과 국가기상 확립 필요

추진방향		유림독립운동 실상의 보존으로 민족자존 정신 함양 및 학생·주민들의 애국정신 고취 시설로 활용

사 업 개 요

위    치 : 산청군 단성면 사월리 973-1번지

사업기간 : 2008. 1 ~ 2013. 10

사업규모 : 부지면적 2,909㎡ / 기념관 397㎡

사 업 비 : 39억원(국비 20억, 도비10억, 군비9억)

주요시설 : 기념관, 전시시설, 주차장, 편의시설 등

사업진행 현황

2010.  3월 : 기념관 설계 용역

2010. 10월 : 실시계획 승인

2012.  6월 : 공사 착공

2013. 10월 : 공사 준공 개관 및 운영

기대효과

애국정신 계승으로 국가발전의 정신적 근간 마련

독립운동 활용 유물과 사료 보존 관리

조  감  도

준공 전경사진