건  설  과

1. 소규모 주민숙원사업	201

2. 도로(군도,농촌도)확포장 사업	202

3. 교량보수 및 기타도로사업	204

4. 위험도로 구조개선사업	206

5. 하천뚝방길 조성사업	207

6. 하도준설사업(중산지구)	208

7. 소하천 정비사업	209

8. 하천퇴적물 제거사업	210

9. 소하천정비 종합계획수립	211

10. 수리시설 개보수사업	212

11. 일반경지정리사업	213

12. 소규모 용수개발사업	214

13. 농촌생활환경정비사업	215

14. 백곡지구 소규모 배수개선사업	216

15. 상정지구 소규모 배수개선사업	217

16. 재해 예·경보시스템 구축 및 유지관리	218

17. 덕산버스정류장 정비사업	220

18. 특별교통수단(교통약자 콜택시) 운영	221

19. 택시 감차보상 지원사업	222

20. 버스승객대기소 설치 및 정비사업	223

21. 교통안전시설물 교통소통 인프라 구축	224

22. 농어촌버스 미 운행지역 한방택시 운영	225

1. 소규모 주민숙원사업

열악한 농촌 마을 환경 개선과 주민들의 생활에 지장을 초래하는 시설물에  대하여 소규모주민숙원사업 추진으로 주민의 삶의 질 향상과 생산기반시설 확충으로 주민소득증대를 도모코자 함

□ 추진방향

❍ 생활환경개선과 생산기반시설 확충으로 소득증대 도모

❍ 생활에 불편을 초래하는 시설물을 개선하여 주민 불편사항 해소

❍ 농업소득 증대와 관련한 사업 추진에 역점

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내(전읍면)

❍ 사 업 량 : 133건(군시행 : 22건, 읍면시행 : 111건)

❍ 사 업 비 : 5,854백만원(군시행 : 2,994백만원, 읍면시행 : 2,860백만원)

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

□ 그간 추진사항

❍ 사업대상지 선정 및 예산확보

❍ 편입부지 토지소유자 동의서 징구 등 협의 진행

□ 추진계획

❍ 조사측량 및 설계 : 2014. 12월 ~ 2015. 1월

❍ 사업시행 및 준공 : 2015.  2월 ~ 2015. 6월

□ 기대효과

❍ 쾌적한 생활환경 조성 및 주민숙원 해소로 삶의 질 향상

❍ 농촌지역개발에 따른 경제활성화 촉진

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계 및 사업시행 (40%)			사업마무리 및 준공(60%)

2. 도로(군도,농촌도) 확포장사업

군도 및 농촌 도로의 미 개량 노선을 확 ․ 포장하여 교통 소통에 원활을

기하고 지역간 접근성을 향상 시켜 주민의 소득증진과 지역 균형발전에 기여

□ 추진방향

❍ 계속사업 집중투자로 조기 마무리

❍ 농촌도로 노선 중 버스 진출입이 불가한 지구에 우선 추진

❍ 신규 사업은 주민 수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진하되

보상부터 시행하여 보상 실적이 높은 지구부터 공사 착수

□ 사업개요                                   (단위:건,km/백만원)

구 분		사 업 량		사업비	비 고
		지구수	연장
계		12	17.644	4,850
농어촌도로정비사업	소 계	6	11.710	2,850
	계속사업	3	9.660	2,100
	신규사업	3	2.05	750
군도정비사업	소 계	6	5.934	2,000
	계속사업	2	1.101	650
	신규사업	6	4.833	1,350

□ 그간 추진사항

❍ 2014년 12월까지 보상협의 및 계속 사업추진

□ 추진계획

❍ 사업장별 전체 사업비 미 확보시 장기계속공사 추진

❍ 신규 발주공사 2월중 시행

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
토지보상협의 및 착공(20%)	노면정지작업및 토공작업(60%)	구조물설치및포장 (100%)

□ 세부사업 현황

구 분		사업량 (km)	사업비 (백만원)	비고
계(14건)		17.644	4,850
소 계(6건)		11.71	2,850
군도정비 사업	수월~소둔철간도로확포장공사(2공구)	1.08	500	계속
	내수~매곡간도로확포장공사	1.80	1,200	계속
	궁소진입도로확포장공사	0.85	500	신규
	군도9호선 법면보강 및 도로정비공사	6.78	400	계속
	군도8호선차황신기지구법면보강	0.10	100	신규
	갈전~둔철간도로포장공사	1.1	150	신규
소 계(8건)		5.934	2,000
농촌도로 정비사업	오휴~대현간도로확포장공사	0.596	600	신규
	소남진입도로확포장공사	0.70	300	신규
	방동진입도로확포장공사	0.756	300	계속
	가축분뇨처리장진입도로확포장공사	0.987	230	신규
	내원~법하간도로확포장공사	1.70	50	신규
	신아~구아간도로확포장공사	0.345	350	계속
	배양새터굴곡도로개량공사	0.30	70	신규
	길리~금만간도로정비공사	0.55	100	신규

3. 교량보수 및 기타도로사업

관내 보수가 필요한 교량에 대하여 유지관리를 시행하여 안전사고를   사전에 예방하고, 군도 및 농촌도로상 시설물 및 배수로 등을 정비하여 도로 유지 관리 및 교통사고 사전예방

□ 추진방향

❍ 관내 보수가 필요한 교량에 보수공사를 시행하여 교량의 기능 복원

❍ 관내 군도 및 농촌도로상 노후시설 및 안전시설 미설치구간, 배수로       미정비 구간 정비 및 교통사고의 위험요소가 있는 지구에 대해 우선적으로       정비 추진

□ 사업개요                                              (단위:건/백만원)

구 분	사업량	사업비	주요사업내용	비 고
계	17	1,775
교량관리사업	2	480	교량 정밀점검 및 보수
도로유지관리사업	9	725	도로유지보수,차선도색등
주민숙원사업	6	570	도로확포장 및 교량재가설

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 1월 : 안전점검용역 및 보수공사 실시설계 용역

□ 추진계획

❍ 사업착수 : 2015.  3월

❍ 사업완료 : 2015. 12월

□ 기대효과

❍ 교량안전진단 결과 결함 사항에 대하여 보수 안전사고 예방

❍ 기존 도로시설물 유지관리를 통하여 안전한 교통로 확보

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
설계 및 착공(20%)	교량 및 도로유지관리 토공작업(60%)	도로유지관리(100%)

□ 세부사업 현황

구 분		사 업 량	사업비 (백만원)	비고
계		17건	1,775
교량관리 사업	소 계	2건	480
	교량정밀점검(6개교)	생비량교,소이교,장란교, 제보교,토현교,장재교	80
	교량보수(16개교)	수산교,어천교,대포교,자양교,고읍교,원리교,소이교,토현교,장란교,생비량교 백운교,연산1교,마실교,운곡못밑교,평촌교,교동교	400
도로유지 관리사업	소 계	9건	725
	군도,농촌도유지보수	군도20개소,농촌도187개소	120
	군도,농촌도차선도색	10개노선(L=15km)	120
	도로변풀베기사업	군도 및 농촌도	100
	도로재해위험지보수	재해위험지 보수	100
	지방도로방호울타리보강사업	방호울타리 설치	100
	도로시설긴급장비대	장비대 1식	50
	도로관리용CCTV교체	6개소	30
	도로관리용CCTV유지보수	14개소	15
	미불용지 보상금 지급	20필지	80
주민숙원 사업	소 계	6건	570
	오봉마을교량재가설공사	L=0.12km	190
	생초갈전마을진입도로정비공사	L=1.0km	100
	중태~유점간차량대피소설치공사	L=0.125km	50
	농어촌도로201호선 대둔~현동간아스콘덧씌우기공사	L=0.85km	100
	관이~가회간도로확포장공사	L=0.07km	70
	신안구석다리도로법면 녹화	6,500㎡	60

4. 위험도로 구조개선사업

위험도로에 대하여 굴곡도로를 개선 차량 통행에 안전을 기하고 교통소통에 원활을 기하여 주민편익증진 및 안전한 보행로 확보에 기여하고자 함

□ 추진방향

❍ 급커브 및 도로 선형불량 구간 정비

❍ 도로배수 기능 불량구간 개선 도로침수 예방

❍ 도로 방호울타리(가드레일)등 도로안전시설 확충

□ 사업개요

❍ 위   치 : 산청군 오부면 내곡리 지내

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2016. 12월

❍ 사업량 : 굴곡도로개량 L=1.245km

❍ 총사업비 : 2,000백만원(광특 1,000백만원, 군도1,000백만원)

※ 2014년 예산 250백만원(광특 125, 군비 125)

2015년 예산 600백만원(광특 300, 군비 300)

2016년 이후 1,150백만원(광특 575, 군비 575)

❍ 사업내용 : 굴곡도로개선 및 안전시설 설치

□ 그간 추진사항

❍ 2014.  3. 6. : 1차분 사업 착수

❍ 2014. 11. 1. : 1차분 사업완료

□ 추진계획

❍ 2015.  2월 : 2차분 사업 착수

❍ 2015. 10월 : 2차분 사업 완료

□ 기대효과

❍ 위험도로를 개선하여 교통사고 사전예방 및 지역균형발전에 기여.

❍ 안전한 교통환경 조성으로 주민편익증진 도모.

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
구조물 설치 및 포장(70%)		부대공(30%)

5. 하천 뚝방길 조성사업

하천 제방의 뚝방길 조성과 주민의 산책로 및 여가 공간을 위한 친수공간 확보와 주민편익증진으로 하천 이용률 증대와 조경수 식재 등으로

아름다운 하천변 조성으로 찾아오는 관광 산청에 기여

□ 사업현황

❍ 사업위치 : 단성면 강누리 경호강 일원

❍ 사업기간 : 2015 .01. ~  2015. 05.

❍ 총사업비 : 320백만원(군비 320)

❍ 사업내용 : L=9.2km(강누․사월제 5.0km, 소남․관정제 4.2km)

- 고수부지 꽃(유채 등) 식재 A= 46,000㎡

- 제방 수목(산수유 등) 식재

- 제방 약초 식재

- 기타 편의시설 : 계단, 쉼터 등

□ 추진계획

❍ 2014. 10 : 고수부지 유채꽃 식재

❍ 2015. 03 : 제방 수목 및 편의시설 설치

❍ 2015. 12 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 고수부지 유채꽃, 수목 식재 등 초기 사업비가 많이 소요될 것으로 판단됨

❍ 고수부지 꽃 식재 및 제방 수목 식재 등의 순으로 사업비 투입 계획

□ 기대효과

❍ 친화적인 하천환경 조성으로 주민여가 생활 및 주민소득 증대

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
실시설계 사업착수(30%)	하천정비(90%)	사업마무리 준공(100%)

6. 하도준설사업(중산지구)

지방하천의 재해위험 우려가 있는 하천제방 정비와 퇴적물을 준설하여 재해를 사전 예방하고, 쾌적한 하천환경을 조성 하고자 함

□ 사업현황

❍ 사업위치 : 시천면 중산리 시천천 일원

❍ 사업기간 :  2015 .01. ~  2015. 12.

❍ 총사업비 : 2,803백만원(국비 1,682 군비 1,121)

❍ 사업내용 : 하천정비 L=1.0km

❍ 원리지구 L=0.4km, 상지지구 L=0.4km, 중산지구 L=0.2km

□ 추진계획

❍ 현지조사 및 실시설계 완료 : 2015. 1월 ～ 2월

❍ 보상협의 추진 : 2015. 3월

❍ 착공 : 2015. 4월중

❍ 준공 : 2015. 8월중

□ 문제점 및 대책

❍ 하천 미개수 및 하천퇴적으로 인하여 집중호우시 농경지 유실 및 침수피해 발생

❍ 미 개수 지구를 조기에 정비하여 재해예방 및 하천오염 예방

□ 기대효과

❍ 집중호우로 인한 수해피해 예방과 재산 보호

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
실시설계 사업착수(30%)	하천정비(90%)	사업마무리 준공(100%)

7. 소하천 정비사업

미개수 소하천 중 하폭이 협소하고 하천의 오염도가 심한 지구와    토사제방이 낮은 소하천의 재해우려 지구를 정비하여 재해를 사전에    예방하고 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

□ 사업현황

(단위 : 백만원)

소하천현황		2014년 시행			2015년 시행 계획			비 고
개소	연장 (km)	개소	연장 (km)	사업비	개소	연장 (km)	사업비
계					6	3.5	2,124
198	247	1	0.5	908	2	1.0	1,604	신안골천 제보뒷골천
					4	2.5	520	수청,물산,창평앞들, 하둔소하천

□ 추진계획

❍ 보상협의 추진 : 2015. 1월 ～ 2월

❍ 착공 : 2015. 2월중

❍ 준공 : 2015. 6월중

□ 문제점 및 대책

❍  토지 보상 및 사업비 과다 소요로 인한 일부 구간(기시공) 제외 시공

⇒ 미개수지역 선시공 기존 시공부분 종합계획 수립 후 추가 시공 여부 판단

□ 기대효과

❍ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

❍ 쾌적한 환경정비로 삶의 질 향상

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기			4/4 분기
편입부지보상 공사착공(30%)	사업 마무리 및 준공(100%)

8. 하천퇴적물 제거사업

2014년 집중호우로 인한 하천 퇴적물 적치로 하천범람 및 제방 유실 우려가 있어 퇴적물을 제거하여 재해 피해를 예방코자 함.

□ 추진방향

❍ 투자대비 효과를 높이기 위해 조기에 사업비 시행

❍ 수해로 인하여 하상이 숭상된 지역 우선 제거 실시

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 산청군 관내

❍ 사업기간 :  2015 .01. 01. ~  2015. 6. 30

❍ 총사업비 : 500백만원

❍ 사업내용 : 하천퇴적물 제거량 100,000㎥(추정)

□ 추진계획

❍ 재해위험 취약지 조사 후 대상지 선정

❍ 각도 공사 성토재 활용 및 저지대 침수지역 성토

□ 문제점 및 대책

❍ 하천퇴적물 제거시 자연석 반출 우려

❍ 지역 주민 감시단을 운영하여 반출 예방

□ 기대효과

❍ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기			4/4 분기
대상지 조사 및 공사착공(30%)	사업 마무리 및 준공(100%)

9. 소하천정비 종합계획수립

산청군 관내 소하천구간에 대하여 소하천의 관리, 이용, 개발・치수경제 및 수질 등 보전에 관련된 사항을 종합적으로 체계 있게 조사 분석하여 당해 소하천에 대한 종합계획을 수립, 향후 소하천정비의 방향이 되는 지침으로 활용하고자 함

□ 사업현황

(단위 : 백만원)

소하천현황		계	기투자	2015	장래	비 고
개소	연장 (km)	4,300	1,500	1,000	1,800
198	247	종합계획1식	1차분시행 (기초조사)	2차분시행 (측량,종합계획수립)	3차분시행 전략환경영향평가

□ 추진계획

❍ 2차분 사업 시행 : 2015. 3월중

❍ 주민설명회 개최(2차)  : 2015. 06월. ～ 2015. 7월

❍ 전략환경영향평가 시행 : 2016년분에 반영

❍ 전체용역완료 예정 : 2017. 02월

□ 문제점 및 대책

❍ 소하천 지정에 따른 지역민들은 민원발생 우려

❍ 주민설명회 등 각종 지역민들의 의견을 수렴하여 기본계획에 반영

□ 기대효과

❍ 소하천 종합계획 수립으로 인한 체계적인 소하천 관리와 정비

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
2차분 시행	측량 및 종합계획수립(70%)		2차분준공(100%)

10. 수리시설 개보수사업

저수지, 용‧배수로, 양수장 등 일부 수리시설이 노후 등으로 기능이 저하되어 농업용수 부족에 따른 막대한 영농 불편을 초래 및 기능저하 수리시설에 대한 보수‧보강을 통해 사전 재해예방 및 영농편의 제공

□ 추진방향

❍ 지역발전특별회계사업으로, 수혜면적, 재해취약성, 손괴 정도에 따라       긴급한 시설 우선으로 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 단성면 창촌리외 2개소

❍ 사 업 량 : 소류지보수 3개소

❍ 사 업 비 : 575,000천원

❍ 사업기간 등

□ 그간 추진사항

❍ 해당없음

□ 추진계획

❍ 2015. 1. ~ 2. : 기본 및 실시설계

❍ 2015. 2. ~ 12. : 개보수 공사 시행

□ 기대효과

❍ 사전재해 및 안전사고 예방으로 주민숙원 해소

❍ 안정적 농업용수 확보로 영농편의 제공 및 나아가 주민소득 증대에       기여 사전재해 및 안전사고 예방으로 주민숙원 해소

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
조사측량 및 설계용역 (30%)	사업시행(60%) 터파기, 기초공사	사업시행 (80%) 구조물공사	사업마무리 및 준공 (100%)

11. 일반경지정리사업

농경지 구획의 정지와 용‧배수로 구조물화 및 농로확장 등을 통해 기계화 영농효과를 극대화 하고 농업 생산성 향상 및 농가소득 증대에 기여

□ 추진방향

❍ 도비 보조사업으로, 미정비된 농경지로 인해 영농에 불편을 겪고 있는       지구 중 사업이 가능한 곳을 선정하여 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 왕촌리외 1개소

❍ 사 업 량 : 2개지구(왕촌지구 A=16.3ha, 실매지구 A=12.50ha)

❍ 사 업 비 : 2,800,000천원

❍ 사업기간 : 2014. 12 ~ 2015. 12

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 4 ~ 6 : 사업시행 계획 수립 및 농어촌공사와 위(수)탁 협약

❍ 2014. 12 : 공사 착수

□ 추진계획

❍ 2014. 12. ~ 2015. 12 : 공사 완료

□ 기대효과

❍ 경지정리로 지역민 영농불편 해소 및 농업 생산성 향상, 주민소득       증대에 기여

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행(30%) 토공정리	사업시행(60%) 구조물공사	사업시행(90%) 교량설치	사업마무리 및 준공(100%)

12. 소규모 용수개발사업

농업용수가 부족한 지역에 저수지, 양수장등의 농업용 수원을 개발하여 안정적인 용수공급으로 농업생산성 향상 및 농가소득 증대를 위한 기반 조성

□ 추진방향

❍ 지역발전 특별회계 사업으로, 농업진흥지역으로 농업용수가 부족하여      영농불편을 겪고 있는 지역 대상으로 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 창촌리

❍ 사 업 량 : 용수로정비 L=0.5km

❍ 사 업 비 : 592,141천원

❍ 사업기간 : 2014. 12 ~ 2015. 12

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 5 : 지특회계 2015년 예산신청

❍ 2014. 12 : 공사 착수

□ 추진계획

❍ 2014. 12. ~ 2015. 12 : 공사 완료

□ 기대효과

❍ 안정적인 농업용수 공급으로 영농편의 제공

❍ 영농조건 개선으로 농업 생산성 향상 및 주민소득 증대

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행(60%) 토공정리	사업마무리(95%)	환지업무착수(98%)	환지업무완료(100%)

13. 농촌생활 환경정비사업

농촌지역의 생활환경, 산업기반 및 편익‧복지시설 등을 종합적으로 정비하고 확충하여 농촌 주민 삶의 질 향상과 국토 균형발전 촉진에 기여하고, 관광 산청의 기틀 마련

□ 추진방향

❍ 지역발전 특별회계 사업으로, 금서면이 본 사업의 최종단계로 2015년      마무리 됨

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 관내

❍ 사 업 량 : 농촌생활환경정비사업 1식

❍ 사 업 비 : 507,000천원

❍ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2015. 12

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 5 : 지특회계 2015년 예산신청

□ 추진계획

❍ 2014. 12. ~ 2015. 12 : 공사 완료

□ 기대효과

❍ 농촌 주거환경 개선으로 주민 삶의 질 향상

❍ 국토균형발전 도모 및 농촌 인구 유입

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
대상지선정 및 실시설계용역	사업시행(30%) 터파기, 기초공사	사업시행(60%) 구조물공사	사업마무리 및 준공 (100%)

14. 백곡지구 소규모 배수개선사업

매년 우수기 반복적인 농작물 침수 피해로 영농 불안정을 겪는 농업

진흥지역에 배수시설 설치 등 배수개선을 통해 재해예방 및 주민숙원 해소와 안전한 영농기반 조성으로 소득증대에 기여

□ 추진방향

❍ 도비 보조 사업으로, 상습적 침수 피해를 입는 경지정리지구를 대상      으로 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 호리

❍ 사 업 량 : 배수장 및 유수지 조성 1식

❍ 사 업 비 : 1,609,660천원

❍ 사업기간 : 2014. 12 ~ 2016. 12

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 7. ~ 2014. 10 : 설계도서 및 시행계획 조정

❍ 2014. 11 : 1차분 공사 착수

□ 추진계획

❍ 2015. 2 : 전기공사 발주

□ 기대효과

❍ 배수장 설치를 통해 농작물 침수피해 예방 등 사전재해예방

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행(30%) 토공정리	사업시행(60%) 구조물공사	사업시행(90%) 교량설치	사업마무리 및 준공(100%)

15. 상정지구 소규모 배수개선사업

매년 우수기 반복적인 농작물 침수 피해로 영농 불안정을 겪는 농업

진흥지역에 배수시설 설치 등 배수 개선을 통해 재해예방 및 주민숙원 해소와 안전한 영농기반 조성으로 소득증대에 기여

□ 추진방향

❍ 도비보조 사업으로, 상습적 침수 피해를 입는 경지정리지구를 대상       으로 사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리

❍ 사 업 량 : 배수장 및 유수지 조성 1식

❍ 사 업 비 : 1,495,000천원

❍ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2017. 1

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 7. ~ 2014. 10 : 설계도서 및 시행계획 조정

□ 추진계획

❍ 2015. 2 : 1차분 공사 착수

□ 기대효과

❍ 배수장 설치를 통해 농작물 침수피해 예방 등 사전재해예방

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행(30%) 토공정리	사업시행(60%) 구조물공사	사업시행(90%) 구조물공사	사업마무리 및 준공(100%)

16. 재해 예·경보시스템 구축 및 유지관리

재해예경보시설 구축 및 재해 예ㆍ경보시스템 유지관리 용역으로 산간계곡 등 재해 취약 지역에 대한 감시와 홍보 강화로 기상특보 및 재난발생시 신속하게 대응하여 군민의 생명과 재산을 보호하고자 함

□ 추진방향

❍  재해예경보시설의 신규설치 및 지속적인 정비로 상시 재난대비 태세 구축

❍  주요시설에 대한 유지관리용역 시행으로 전문적인 관리시스템 구축(5월~12월)

□ 사업개요

사업명	기투자		2015년		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비
계		3,163		452
자동기상관측장비 (AWS) 구축사업	8	240	2	60	기금사업
음성통보시스템 구매설치	179개소	1,280	-	-
지진가속도 계측기 설치	-	-	1개소	150	기금사업
농어촌 경보시설 확대설치	-	-	4개소	160
자연재해관측장비 유지관리	83개소	1,643	ㆍ자동우량경보시설 : 6개 지구 61개소 ㆍ강우량계 및 자동기상 관측장비 : 18개소 ㆍ재해문자전광판 : 4개소	82

□ 추진계획

❍  자동기상관측장비(AWS), 지진가속도계측기, 농어촌 경보시설 설치

- 2015년 2월 : 사업대상지 선정

- 2015년 3월 : 사업 착공

- 2015년 7월 : 사업 준공 및 시험운영

❍  재해예ㆍ경보시스템 유지관리

- 2015년 4월 ∼ 5월 : 재해예ㆍ경보시설 종합 점검 및 정비

- 2015년 5월 ∼ 12월 : 재해예ㆍ경보시스템 유지관리용역

□ 기대효과

❍  각종 재해 상황 전파 및 정보 제공으로 주민의 생명과 재산 보호

❍  유관기관 및 마을이장 시스템 사용으로 신속한 재해 대응 및 대처

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
업체선정 및 계약 사업착수(30%)			자동기상관측장비, 지진가속도계측기, 농어촌 경보시설 설치(70%)			장비설치완료 (90%)			유지보수용역 완료 (100%)

17. 덕산버스정류장 정비사업

시설 노후화 및 협소로 교통사고의 위험이 높은 덕산버스정류장을 재정비하여 지역주민의 교통편의 제공과 지리산을 찾는 방문객에게 관광 산청의 이미지 제고

□ 추진방향

❍ 덕산버스정류장 정비·이전 타당성 연구용역 및 주민공청회를 거쳐

정비사업 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 일원

❍ 사 업 량 : 주차장 조성 990㎡, 터미널 건축 165㎡

❍ 사 업 비 : 2,300백만원(보상 및 사업비 2,000, 용역비 300)

❍ 사업기간 : 2015 ∼ 2016(2년간)

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 12월 : 예비타당성 조사용역 예산 30백만원 확보

❍ 2015. 1월  : 덕산버스정류장 이전․확충방안 예비타당성 연구용역계획

□ 추진계획

❍ 2015. 2월∼  : 덕산버스정류장 이전․확충방안 예비타당성 연구용역

❍ 2015. 5월∼  : 편입부지 및 지장물 보상비 확보

❍ 2015. 6월∼  : 실시설계용역 시행

❍ 2015. 8월∼  : 편입부지 및 지장물 보상 추진

❍ 2015. 10월∼ : 추가소요사업비 ‘16년 당초예산 확보 추진

□ 기대효과

❍ 현대화된 버스정류장 조성으로 대중교통 이용 증대 및 이용객의 편의 증진

❍ 지리산을 찾는 방문객에게 관광 산청의 이미지 제고

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
예비타당성 조사용역	사업예산(보상비) 확보	실시설계 용역	보상 추진 및 추가(건립)예산확보

18. 특별교통수단(교통약자콜택시)운영

대중교통수단 이용에 어려움을 겪고있는 교통약자(장애인)들에게 이동편익 증진 및 사회활동참여 기회 제공

□ 추진방향

❍ 계약 기간 만료 도래에 따른 운영 업체 선정 및 계약체 결을 통하여       사업 시행과 사업홍보를 통한 특별교통수단 이용 확대 증진

□ 사업개요

❍ 사업내용 : 특별교통수단 4대에 대한 운영비 및 유지 관리비 지원

❍ 사 업 량 : 특별교통수단 4대 운영 (법정대수)

❍ 사 업 비 : 140백만원 (대당 35백만원)

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ∼ 2015. 12월

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 12월 : 특별교통수단 1대 구입(법정대수 4대 충족)

□ 추진계획

❍ 2015. 5월 : 2015. 7월 계약기간 만료에 따른 운영업체 선정

* 계약기간 : 2012. 8월 ∼ 2015. 7월 (3년)

❍ 2015. 6월 : 운영업체 선정을 위한 교통약자 이동편의 증진위원회 개최

❍ 2015. 7월 : 선정업체와 운영 계약체결 및 사업시행

□ 기대효과

❍ 대중교통수단 이용이 어려운 교통약자에 대한 이동편의 증진

❍ 교통약자의 이동권 확보로 복지산청 구현

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행(25%)	사업시행(55%) 운영업체 재선정	사업시행(75%) 운영업체 계약체결	사업완료(100%)

19. 택시 감차 보상 지원사업

택시 감차를 통하여 과잉공급되어 있는 택시운송사업의 구조개선 및 여객운송사업의 장기적인 발전을 도모코자 함

□ 추진방향

❍ 택시감차위원회를 구성하여 위원회의 결정에 따른 감차 보상을 시행하며,       감차보상 이후 일정기간 증차를 제한함으로써 택시운송사업자의 과잉      공급 해소

□ 사업개요

❍ 사 업 량 : 택시 감차 수 58대 (49.5%) - 면허대수 117대 (4개 업체)

❍ 사 업 비 : 1,160백만원 (국비 226 , 군비 934)

❍ 사업내용 : 택시업체 자율 감차

❍ 사업기간 : 2015 ∼ 2019년 (5년)

(단위: 대, 백만원)

구 분	계	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
감 차 수	58	11	11	11	11	14
사 업 비	1,160	220	220	220	220	280

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 2 ∼4월 : 택시 사업구역별 총량제 실태조사 연구용역 시행

❍ 2014. 9∼12월 : 용역결과물 경상남도 및 국토부 택시총량제 심의위원회 심사

□ 추진계획

❍ 2015. 1월~ :  산청군 택시감차위원회 구성

❍ 2015. 3월~ :  산청군 택시감차위원회 회의개최 및 사업시행

□ 기대효과

❍ 택시운송사업자의 경쟁력 향상으로 택시 운수종사자 근로여건 개선

❍ 택시 이용객 서비스 만족도 향상

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
택시감차위원회 구성 및 회의 개최	사업시행(55%) 감차보상	사업시행(75%) 감차보상	사업완료(100%) 감차보상

20. 버스승객대기소 설치 및 정비사업

주변경관에 잘 어울리는 버스승객 대기소 신설과 노후화된 시설의 보수로 대중 교통 이용승객의 편의제공 및 깨끗한 산청군 이미지 제고

□ 추진방향

❍ 산청군의 이미지를 대표하는 디자인으로 버스 승객대기소를 신설하고        노후화된 기존 승객대기소를 도색작업 등을 통해 깨끗이 정비함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 외 10개면

❍ 사 업 량 : 승객대기소 설치 11개소, 보수 33개소

❍ 사 업 비 : 121백만원 (신설 11, 보수 33)

❍ 사업기간 : 2015. 3월 ～ 2015. 5월

구 분	계	산청	차황	오부	생초	금서	삼장	시천	단성	신안	생비량	신등
기설치	193	22	16	8	12	18	15	22	34	21	9	16
2015년	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 12월~ : 읍ㆍ면 신청에 의한 우선순위별 대상지 선정

□ 추진계획

❍ 2015. 3월∼  : 예산재배정에 의한 읍․면별 자체 사업시행

□ 기대효과

❍ 대중교통 이용객의 편의제공, 교통사고 예방 및 이정표 역할

❍ 주변의 경관과 어울리는 승객대기소 설치와 노후화된 시설의 정비로

깨끗한 산청군 이미지 제고

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행(25%) 읍․면 별 예산재배정	사업시행(55%)	사업시행(75%)	사업완료(100%)

21. 교통안전시설물 교통소통 인프라 구축

도로 신설 및 교통수요 증가에 따른 교통소통 인프라 구축 및 교통안전 시설물 유지보수를 통한 교통약자 보호 및 교통안전 확보

□ 사업개요

❍ 사 업 량 : 교통안전표지판 설치사업(60개소)외 7개 단위사업

❍ 사 업 비 : 242백만원

❍ 사업기간 : 2015. 2월 ∼ 12월

□ 추진계획

사 업 명	내 용	수 량	단 가 (천원)	금 액 (백만원)
계	8개 사업			242
교통안전표지판	국도 3․20호,지방도,군도 등 기타도로 (노후시설물 교체 등 포함)신설	60개소	200	12
LED 태양광 싸이키 경광등 설치	교통사고위험지역태양광LED램프설치	5개소	2,000	10
횡단보도 투광기 LED 교체공사	횡단보도 야간통행자 보호 LED램프설치	10개소	4,000	40
교통안전시설물 유지보수	교통신호등 10, 경보등 30, 경광등 20, 투광등 20, 반사경 50개소	120개	250	29
교통사고위험지역 안전시설물 설치 및 보강	주정차단속 CCTV 개선	2개소	5,000	10
	노후교통신호등 철주	3개소	8,000	24
	반사경	20개소	4,000	8
	홍보안내물	1식	3,000	3
과속카메라 설치	신안면 홍화원앞 하행선	1개소	40,000	40
차선도색사업	관내 주요도로 횡단보도ㆍ문자 등 노면표시 전면 재도색	40㎞	610	24
교통약자 교통안전지원사업	안전모 구입	1,200개	20	24
	야광지팡이 구입	1,200개	15	18

□ 기대효과

❍ 노약자 등 교통약자의 안전보장을 통한 교통 복지 향상

❍ 교통사고 발생우려 증가에 따른 안전한 교통인프라 구축

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수	관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수(60%)	관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수(80%)	관내 교통시설물 조사 신규․유지 보수(100%)

22. 농어촌버스 미 운행지역 한방택시운행

농어촌버스가 운행되지 않는 교통소외지역에 한방택시를 운행하여 지역 주민의 이동권 확보와 교통 복지 증진 도모

□ 추진방향

❍ 한방택시 이용 대상마을 및 주민 사전 선정

❍ 한방택시 이용 주민 탑승료 지원

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 버스승강장으로부터 2km이상 떨어진 자연마을

❍ 사 업 량 : 7개면 14개리 20개 마을

❍ 사 업 비 : 100백만원

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 12월

□ 그간 추진사항

❍ 2014.  7월 : 한방택시운행 대상마을 파악 (버스승강장과 1㎞이상 떨어진 마을)

❍ 2014. 11월 : 한방택시운행 대상마을 선정 (버스승강장과 2㎞이상 떨어진 마을)

❍ 2014. 12월 : 농어촌버스 미 운행지역 한방택시 운행 조례 제정

❍ 2014. 12월 : 한방택시 운행 세부계획 수립

❍ 2015.  1월 : 한방택시 운행 마을대표와 택시운송사업자 간 협약 체결

□ 추진계획

❍ 2015. 1월 26일  : 한방택시 운행사업 시행

❍ 2015. 2월∼12월 : 매월말 운행실적에 의한 읍․면별 예산재배정

□ 기대효과

❍ 한방택시 운행으로 교통소외지역 주민의 이동권 확보

❍ 교통비 지원으로 경제적 부담을 줄여줌으로써 주민복지 실현

□ 분기별 추진

1/4 분기	2/4 분기	3/4 분기	4/4 분기
사업시행(25%) 협약서 체결	사업시행(50%)	사업시행(75%)	사업완료(100%)