경제도시과

1. 산청군 도시가스(LNG) 공급 추진	189

2. 단성시장 주차장 조성	190

3. 친서민 공공 일자리사업 추진	191

4. 농촌 주거환경 개선	192

5. 아파트 주변 도로정비사업	193

6. 산청군관리계획 재정비	194

7. 지정게시대 및 지정광고판 설치사업	195

8. 생초화촌마을 도로 개설	196

9. 산청한방․항노화산업단지진입도로개설공사	197

1. 산청군 도시가스(LNG) 공급 추진

양질의 도시 가스를 조기에 공급하여 군민들의 연료비 부담을 경감 시키고 이를 통해 삶의 질을 향상시키기 위함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 관내 일원

❍ 소요예산 : 약11,000백만원(군 4,000백만원, GSE 7,000백만원-하동군 계약기준)

※ 2015년 경제성 검토 용역비 20백만원 편성 요구

❍ 공급관로 : 20Km (평균공사비 : 480,000원/m, 기지건설비용: 10억원)

❍ 공급대상 : 800가구(산청읍), 34개 업체(산업단지 내)

❍ 사업기간 : 2015. ～ 2019.(5년간)

※ 단, 제12차 장기 천연가스 공급계획에 포함되었을 경우임

❍ 주요공정 : 위성기지(LNG탱크설비)건설, 시내 공급관로 20km

□ 그간 추진상황 및 향후계획

❍ 2014.11 : 도시가스 공급 업체[㈜GSE] 사업성 검토

❍ 2015.02 : 경상남도,한국가스공사,경상남도 내 미공급지역(산청,남해,합천)

도시가스 공급 관련 검토 및 회의

❍ 2015.05 : 제12차 장기 천연가스 수급계획 선정 (산업통상자원부)

❍ 2015.07 : 도시가스 사업자 선정 및 허가 (경상남도)

□ 기대효과

❍ 도시가스 조기공급 가능으로 군민의 삶의 질 향상

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업성 검토			수급계획 선정			사업 시행			사업 시행

2. 단성시장 주차장 조성

2009년도 조성된 주차장이 2013년 건립된 119 안전센터 청사 부지로 다수 편입되어 장날 주차난 초래하여 이를 해소코자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 단성면 성내리188-5번지외1필

❍ 사 업 량 : 359㎡

❍ 사 업 비 : 300백만원(군비300)

❍ 사업기간 : 2015.02.01. ~ 12.30.

□ 추진계획

❍ 2015.02. : 군정조정위원회 심의

❍ 2015.03. : 토지 및 지장물 보상협의 및 수용

❍ 2015.03. : 추경에 시설비 확보하여 사업추진

□ 기대효과

❍ 주차난 해소를 통해 이용객 편익증진

❍ 지역상권 활성화를 통한 지역경제 발전 도보

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계, 대상지선정 부지매입			사업시행(60%) 터파기, 기초공사			사업시행 (80%) 포장공사			사업마무리 및 준공 (100%)

3. 친서민 공공 일자리사업 추진

공공일자리 제공을 통한 취약계층 생계안정 및 지역경제 활성화 도모

□ 추진방향

❍ 취약계층(장애인, 북한이탈주민, 여성가장세대 등)의 자립기초 도모

❍ 지역적․주민주도적 일자리창출을 통한 지속적 일자리 창출에 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 공공근로사업, 지역공동체일자리사업

❍ 사 업 량 : 200여명

❍ 사 업 비 : 535백만원

❍ 사 업 장 : 공공근로사업(37개 사업장), 지역공동체일자리사업(11개 사업장)

□ 추진계획

❍ 모집공고

ㆍ 지역공동체일자리사업 : 1차(2015. 1월), 2차(2015. 6월)

ㆍ 공공근로사업         : 1단계(2014. 12월), 2단계(2015. 6월)

❍ 사업기간

ㆍ 지역공동체일자리사업 : 1차(2014. 3월～6월), 2차(8월～11월)

ㆍ 공공근로사업         : 1단계(2014. 1월～6월), 2단계(7월～11월)

❍ 안전교육 실시 : 2회(4월, 9월)

❍ 각 사업장별 안전관리자 지정 : 안전사고 발생 0건 목표

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
공공근로사업 시행 지공체 접수 및 선발			사업시행(60%) 공공근로 2단계 접수			사업시행 (80%) 2차분 접수 및 선발			차년도 사업대상지 조사 및 선정

4. 농촌 주거환경 개선

농촌지역의 쾌적한 생활환경 조성을 위해 노후·불량 주택을 정비하여 군민 삶의 질 향상 및 관광 산청 이미지 제고

□ 추진방향

❍ 노후·불량 주택 개량 및 철거로 주거환경 개선

❍ 상반기 중 사업완료를 위해 행정지도에 적극 노력

□ 추진계획

❍ 농촌주택개량사업

• 사 업 량 : 90동 (특별배정 20동, 일반배정 70동)

• 지원기준 : 60,000천원/동당 한도 융자지원(연리2.7%, 1년거치 19년 분할상환 등)

• 지원대상 : 노후․불량 및 슬레이트 건축물 우선 지원

❍ 빈집정비사업

• 사 업 량 : 40동 (슬레이트지붕 25동, 일반지붕 15동)

• 지원기준 : 슬레이트지붕 500천원/동, 일반지붕 1,000천원/동

• 사 업 비 : 27,500천원(도비30%, 군비70%)

• 정비대상 : 1년 이상 거주․사용하지 않고 방치되어 있는 건물

❍ 노후․불량 주택 지붕개량사업

• 사 업 량 : 25동

• 지원기준 : 4,240천원/동당(보조금 5,000, 자부담 5,000)

• 사 업 비 : 106,000천원(도비15%, 군비35%, 자부담50%)

• 지원대상 : 노후․불량한 주택 중 건축주가 직접 거주하는 주택(본채)의 슬레이트 지붕을 개량하고 자부담이 가능한 주택

❍ 슬레이트 처리 지원사업

• 사 업 량 : 70동 (주택개량연계 20동, 빈집연계 25동, 지붕개량연계 25동)

• 사 업 비 : 235,200천원

• 지원기준 : 3,360천원/동당(국비50%, 도비15%, 군비35%)

• 정비대상 : 주택개량사업 등 연계하여 지붕개량 사업과 연계하여 처리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업계획 수립 및 대상자 선정			사업시행

5. 아파트 주변 도로정비사업

삼한 사랑채아파트 주변 도로정비사업으로 교통 혼잡, 사고발생 등을 미연에 방지하고 쾌적한 정주공간을 조성하고자 함.

□ 추진방향

❍ 진출입 차량을 위한 가감속 차선설치 및 도로 확장으로 교통혼잡 해소

❍ 부출입구에서 향교방향 도로폭 확장으로 화재시 소방차 진입이 용이함.

□ 사업개요

❍ 위    치  : 산청군 산청읍 지리 351-1번지 외 7필지

❍ 사업기간  : 2015.01. ~ 12.

❍ 사 업 량  : 지장물 철거 5개소, 도로포장 523㎡

❍ 총사업비  : 350백만원

❍ 사업내용  : 아파트 주변 도로정비

□ 추진계획

❍ 2015.01. ~ 03. : 토지 보상 및 지장물 철거공사

❍ 2015.03. ~ 04. : 기본 및 실시설계

❍ 2015.04. ~ 12. : 도로정비사업 시행

□ 기대효과

❍ 삼한 사랑채아파트 주변 도로정비사업으로 교통혼잡 및 사고발생 등을    미연에 방지하고 쾌적한 정주공간 조성

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
토지보상 및 지장물 철거			도로정비사업 시행

6. 산청군관리계획 재정비

「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제34조(도시계획의 정비)의 규정에 의거 우리군의 특성, 기능 및 토지이용도 제고 및 개발방향 제시

□ 추진방향

❍ 군관리계획(재정비)를 통해 개발여건 변동에 따른 장기발전방향을         구체화하고 현지 여건에 맞는 합리적이고 종합적인 군 관리계획 수립

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 전역(794.593㎢)

❍ 사 업 량 : 군관리계획(재정비) 수립 용역(항공측량 포함)

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(2013년:700백만원, 2014년:800백만원, 2015년:500백만원)

❍ 사업기간 : 2013. 8. ~ 2015. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2013.08. ~ 12.      : 기초조사, 계획시설(도로, 학교, 주차장 등) 결정(변경)

❍ 2013.11. ~ 2014.03. : 항공측량 실시 및 수치지도 제작 완료

❍ 2013.12. ~ 2014.03. : 장기미집행시설 조사 및 단계별 집행계획 수립 보고 완료

❍ 2014.03. ~ 2014.12. : 도시지역 및 지구단위계획구역 재정비(안) 협의

❍ 2014.12.            : 산청군 관리계획(안) 도출

□ 추진계획

❍ 2015.02. ~ 07.     : 주민설명회, 공청회 개최, 관련 실과 및 유관기관 협의

❍ 2015.05. ~ 07.      : 군의회 의견 청취, 산청군계획위원회 자문

❍ 2015.08.            : 산청군관리계획(안) 결정 신청(산청군→경상남도)

❍ 2015.11.            : 경상남도 도시계획위원회 심의

❍ 2015.12.           : 군관리계획 결정 및 지형도면 고시

□ 기대효과

❍ 종합적인 군 관리계획 수립으로 주민불편사항 해소 및 토지이용의 효율적 관리․정비

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
주민의견청취(설명회, 공청회 개최) 관련실과(기관) 및 군의회 의견 청취						산청군계획위원회 자문 군관리계획안 결정 신청			경상남도 도시계획위원회 심의 군관리계획 결정 및 지형도면 고시

7. 지정게시대 및 지정광고판 설치사업

무질서하게 난립해 있는 불법 현수막 및 옥외광고물을 지정된 게시대, 광고판 설치사업을 통해 도시미관 향상과 쾌적한 생활환경 조성

□ 추진방향

❍ 지정게시대 및 광고판 설치사업을 통한 도시미관 향상과 쾌적한        생활 환경조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 지정게시대 8식(신규6, 정비2), 지정광고판 2식(신규2)

❍ 사 업 비 : 74,000천원

❍ 사업기간 : 2015.01. ~ 12.

□ 추진계획

❍ 2015.01. ~ 02. : 사업대상지선정, 읍․면 예산배정

❍ 2015.03. ~ 12. : 사업추진

□ 기대효과

❍ 깨끗한 거리환경조성 및 주민생활편익 제공

❍ 보행자의 안전 및 통행차량 불편해소

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업대상지선정 읍․면예산배정			사업시행

8. 생초화촌마을 도로 개설

도로 개설사업을 통한 차량 진․출입 확보로 화재예방 및 주민생활 불편해소로 정주여건 개선

□ 추진방향

❍ 도로 개설사업을 통한 진․출입로 확보 및 주민생활 편익 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 생초면 어서리 화촌마을 일원

❍ 사 업 량 : 도로개설(L=137m, B=5.0m)

❍ 사 업 비 : 360백만원(2014년 200백만원, 2015년 본예산 80백만원, 미확보 80백만원)

❍ 사업기간 : 2014.01. ~ 2015.07.

□ 그간 추진사항

❍ 2014.01. ~ 03. : 도로개선을 위한 실시설계

❍ 2014.03. ~ 05. : 지적측량 및 감정평가 의뢰

❍ 2014.05. ~ 12. : 편입토지 및 지장물 보상 협의

□ 추진계획

❍ 2015.01. ~ 02. : 편입토지 및 지장물 보상 협의

❍ 2015.03.       : 공사착공

❍ 2015.07.       : 공사준공

□ 기대효과

❍ 차량진입이 어려운 지역의 대형 화재 예방

❍ 주민생활 불편 해소로 정주여건 개선

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
편입토지 및 지장물 보상협의			공사착공 및 준공

9. 산청한방․항노화산업단지 진입도로 개설공사

산청의 새로운 미래 성장을 이끌 『한방특구, 항공산업, 항노화 산업』등 다양한 산업이 집적된 지구의 연결로 미개설로  사업 추진 애로

□ 사업개요

❍ 위    치 : 경남 산청군 금서면 매촌리

❍ 사업기간 : 2014. ～ 2016.(3년간)

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=0.36km, B=25m

❍ 사 업 비 : 6,900백만원(국비742, 도비2,750, 군비3,408)

(단위:백만원)

재원별	총사업비	기투자 (2014년까지)	투 자 계 획			비고
			소계	2015년	2016년이후
계	6,900	3,400	3,500	2,442	1,058
국 비	742	700	42	42	0
도 비	2,750	1,000	1,750	1,200	550
군 비	3,408	1,700	1,708	1,200	508

□ 그간 추진사항

❍ 2013.12. ～ 2014.07. : 설시설계 완료

❍ 2014.04. ～ 2014.07. : 주민설명회 개최(2회)

❍ 2014.07. ～ 현재    : 편입토지 보상추진(53필지 중 26필지 보상완료 50%)

□ 추진계획

❍	2015.06.	:	편입부지 보상 완료
❍	2015.07. ~ 2016.12.	:	공사 착공 및 준공

□ 기대효과

❍ 한국우주항공산업 공장가동으로 인구 유입 및 물류수송 용이

❍ 인구증대에 따른 세수증대 효과(주민세, 자동차세 등)

❍ 한방․항노화와 항공산업의 접목으로 전통산업과 첨단산업을 동시에 갖춘 특색있는 지역으로 발돋움 효과가 예상됨

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
보상협의			보상협의			계약심사 및 공사착공			토공 및 구조물 공사