상하수도사업소

1. 안심하고 마실 수 있는 물 공급	283

2. 생비량지구 지방상수도 인입공사	284

3. 산청․생초 지방상수도 통합 및 확장공사	285

4. 지방상수도 정비사업	286

5. 마을상수도 개보수 및 유지(긴급)보수사업	287

6. 소규모수도시설개량사업	288

7. 소이지구 농촌마을하수도 정비사업	289

8. 산청하수관거 개․보수 정비사업	290

9. 시천.단계지구 하수관로 정비사업	291

10. 산청공공하수처리시설 증설사업	292

11. 공공하수처리시설 유지관리 및 운영	293

1. 안심하고 마실 수 있는 물 공급

노후시설 개선과 체계적인 관리를 통하여 보다 나은 상수도 서비스를  제공함으로써 주민들이 안심하고 마실 수 있는 맑은 물을 공급하고자 함

□ 사업개요

구 분		사업량	사업비 (백만원)	비 고
계			1,000
지방상수도	시설물정비 정비(보수, 시스템 구축)	18식	438
	상수도 누수탐사(산청,신안,시천)	3개소	60
	산청정수장 주변 휀스 설치	2식	12
	상수도 노후 계량기 교체	300개	24
소규모 수도시설	위탁관리	291개소	205
	염소투입기 관리	291개소	65
	수질검사 실시(분기별)	291개소	181
먹는물 공동시설	약수터 정비	3개소	15

□ 추진계획

❍ 2015. 03.～10. : 정수장 시설물정비

❍ 2015. 04.～06. : 상수도 누수 탐사(3개소)

❍ 2014. 03.～06. : 산청정수장 상수원 주변 휀스 설치

❍ 매분기 : 소규모 수도시설 소독약품 및 여과필터 교체

❍ 매월, 매분기 : 수질검사 결과 공포

□ 기대효과

❍ 철저한 수질관리와 시설개선을 통하여 수돗물에 대한 신뢰도 제고

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
수질검사 실시 및 시설물 정비			수질검사 및 누수 탐사 실시			수질검사 및 정수장 주변 휀스 설치			수질검사 실시

2. 생비량지구 지방상수도 인입공사

생비량면 일대의 수질 악화 및 원수 부족 등의 문제로 수도 공급에 애로가 있어 본 사업을 통해 지방 상수도를 인입하여 지역주민들에게 깨끗하고 안정적인 지방상수도를 공급하고자 함

□ 추진방향

❍ 생비량면 일대 등에 안정적이고 깨끗한 지방상수도를 공급하여 지역       주민의 장기적 편익을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일대

❍ 사 업 량 : 수도정비기본계획(변경) 1식, 수도노선측량 L=42.2㎞ 외

❍ 사 업 비 : 8,180백만원(공사비 7,298백만원, 용역비 882백만원)

❍ 사업기간 : 2014. 01. ∼ 2017. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2013. 10. : 본 사업 기획재정부 승인 및 관련용역 PQ기술심의 완료

❍ 2013. 12. ~ 현재 : 도급 용역업자 선정 및 착공 추진

❍ 2014. 11. : 수도정비기본계획 부분변경(단성급수구역) 보고서 제출 및 협의

□ 추진계획

❍ 2015. 02. : 환경부 수도정비기본계획(변경) 승인예정

❍ 2015. 03. : 실시설계용역 과업 변경

❍ 2015. 04. : 총사업비 변경 승인 요청 및 협의

❍ 2015. 06. : 총사업비 승인예정 및 관련법 등 협의

❍ 2015. 07. : 착공 예정

□ 기대효과

❍ 지방상수도 공급을 통한 안정적인 맑은물 공급

❍ 지역주민의 장기적 편익 제고 및 지방상수도의 효율적 관리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
수도정비기본계획(변경) 승인 및 용역 준공			환경부 총사업비 변경승인 및 관련법 등 협의 완료			지방상수도 인입 공사 발주 및 착공			지방상수도 인입 공사 1차분 추진

3. 산청·생초 지방상수도 통합 및 확장공사

기존 정수장 시설 등의 노후화와 정수처리 시설의 능력저하 및 시설용량의 한계도달의 문제로 분산된 시설의 통합 및 신규 정수장 증설을 통해 지역주민들에게 깨끗하고 안정적인 지방상수도 공급하고자 함

□ 추진방향

❍ 지방 상수도 통합 운영 및 공급으로 수도시설의 효율적 관리와 지역주민의

장기적 편익 도모 및 복지 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일대

❍ 사 업 량 : 취․정수시설 Q=5,500톤/일, 송․배수관로 L=24.7㎞

❍ 사 업 비 : 29,717백만원(국비 16,824백만원, 군비 12,893백만원)

❍ 사업기간 : 2010. 12. ~ 2016. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2010. 12. ~ 2012. 06. : 본공사 1차분 공사 착공 및 준공

❍ 2012. 05. ~ 2013. 07. : 본공사 2차분 공사 착공 및 준공

❍ 2013. 05. ~ 현재

- 본 공사 3·4차분 공사 추진

- 전면 책임감리 용역 2차분 및 폐기물처리용역 추진

□ 추진계획

❍ 2015. 02.      : 전면책임감리용역 2차분 준공 및 3차분 발주 예정

❍ 2015. 03.      : 기타사업(제어계측, 기계분 등) 발주 예정

❍ 2015. 06. ~ 10. : 본공사 3·4차분 공사 준공 및 5차분 발주 예정

❍ 2015. 11. ~ 12. : 기타사업 및 용역사업 준공 예정

□ 기대효과

❍ 시설 통합으로 부족한 수원확보 및 지방상수도 시설의 효율적 관리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
동절기공사중지 기타사업발주예정			기타사업 추진 3차분 공사 준공			4차분 공사 준공 5차분 공사 발주			5차분 공사 추진

4. 지방상수도 정비사업

지방상수도 관로 노후화로 인하여 누수 등이 빈번히 발생하여 정비 사업을 통하여 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함

□ 추진방향

❍ 지방 상수도를 이용하는 주민들에게 안정적이고 깨끗한 식수를 공급하여 장기적 편익을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 대포리 외 1개리

❍ 사 업 량 : 노후관로 교체, 교량 관매달기 등

❍ 사 업 비 : 200백만원

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2015. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 12. : 설계완료

□ 추진계획

❍ 2015. 03. : 사업 착수

❍ 2015. 10. : 사업 준공

□ 기대효과

❍ 지방상수도사업을 통한 안정적인 맑은물 공급

❍ 지역주민의 장기적 편익 제고 및 지방상수도의 효율적 관리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업 착공			상수관로 매설 등			상수관로 매달기 등			최종 사업 준공

5. 마을상수도 개보수 및 유지(긴급)보수사업

노후된 상수도 및 관로 누수등으로 식수 사용에 어려움이 있는 마을에

개보수 및 유지보수사업을 통하여 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함

□ 추진방향

❍ 마을 상수도를 이용하는 주민들에게 안정적이고 깨끗한 식수를 공급      하여 장기적 편익을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 외 10개면

❍ 사 업 량 : 노후관교체, 관정개발, 배수지 휀스설치 등

❍ 사 업 비 : 1,053백만원

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2015. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 11. : 사업대상지 선정

❍ 2014. 12. : 실시설계용역 시행

□ 추진계획

❍ 2015. 02. : 설계완료 및 사업발주

❍ 2015. 03. : 사업착수

❍ 2015. 11. : 사업준공

□ 기대효과

❍ 마을상수도사업을 통한 안정적인 맑은물 공급

❍ 지역주민의 장기적 편익 제고 및 지방상수도의 효율적 관리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계완료 및사업시행			사업착공 및 준공			집행잔액 사업시행			최종 사업 준공

6. 소규모수도 시설개량사업

소규모수도 시설의 노후화 등으로 인하여 상수도 사용에 어려움이 있어

시설물의 개량하여 주민들에게 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함

□ 추진방향

❍ 소규모 수도시설을 이용하는 주민들에게 안정적이고 깨끗한 식수를       공급하여 장기적 편익을 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 외 10개면

❍ 사 업 량 : 노후관 및 배수지 교체, 관정개발 등

❍ 사 업 비 : 1,571백만원

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2015. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 11. : 사업대상지 선정

❍ 2014. 12. : 실시설계용역 시행

□ 추진계획

❍ 2015. 02. : 설계완료 및 사업발주

❍ 2015. 03. : 사업착수

❍ 2015. 11. : 사업준공

□ 기대효과

❍ 소규모수도시설 개량을 통한 안정적인 맑은물 공급

❍ 지역주민의 장기적 편익 제고 및 지방상수도의 효율적 관리

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계완료 및 사업시행			사업 착공 및 준공			집행잔액 사업시행			최종 사업 준공

7. 소이지구 농촌마을하수도 정비사업

농촌지역의 열악한 주거환경 개선을 위한 마을하수도 설치로 쾌적한 주거환경조성 및 생활오수의 적정처리로 양질의 수자원 확보 등 수질환경

개선에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 소이리 일원

❍ 사 업 량 : 처리장 1식(45㎥/일), 관로 L=7.94㎞

❍ 사 업 비

- 총사업비 : 2,300백만원[국비(70%), 기금(18%), 도비(6%), 군비(6%)]

⇒ 2015년 690백만원(국비 483 , 기금 123, 도비 42, 군비 42)

❍ 사업기간 : 2015. 01. ∼ 2016. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2011. 01. : 실시설계용역 보완

□ 추진계획

❍ 2015. 01. ~ 2015. 02. : 부지매입 및 주민의견수렴

❍ 2015. 03. ~ 2015. 04. : 설치인가 및 재원협의

❍ 2015. 05.            : 1차공사 착공

❍ 2016. 12.            : 1차공사 준공

□ 기대효과

❍ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보와 수질개선에 기여

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
부지매입 및 주민의견수렴			1차공사 시행 하수관거 설치			1차공사 시행 하수관거 설치			1차공사 마무리 및 준공)

8. 산청하수관거 개․보수 정비사업

하수관거 및 배수설비 노후로 인한 불명수 유입과 저농도 하수 유입으로

하수처리장의 처리효율 저하에 따른 하수관거를 개․보수하여 하수처리시설 처리효율 향상 및 깨끗한 수질환경 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 산청하수처리구역

❍ 사 업 량 : 하수관거 개․보수 L=3,967m, 배수설비 1,167가구 등

❍ 사 업 비

- 총사업비 : 5,330백만원(국비 36%, 기금 38%, 군비 26%)

⇒ 2015년 1,646백만원(국비 617, 기금 412, 군비 617)

❍ 사업기간 : 2012. 01. ∼ 2016. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2011. 03. ∼ 2011. 10. : 산청하수관거 기술진단 실시

❍ 2012. 04. ∼ 2013. 02. : 실시설계용역 실시

❍ 2013. 03. ∼ 2013. 08. : 재원협의 및 계약심사

❍ 2013. 10.            : 1차공사 착공

❍ 2014. 06.            : 1차공사 준공

❍ 2014. 10.            : 2차공사 착공

□ 추진계획

❍ 2015. 02. : 3차공사 착공

❍ 2015. 04. : 2차공사 준공

❍ 2015. 12. : 3차공사 준공

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
3차공사 시행 하수관로 정비			3차공사 시행 하수관로 정비			3차공사 시행 하수관로 정비			3차공사 시행 하수관로 정비

9. 시천․단계지구 하수관로 정비사업

하수관거 정비 2단계(2015년) 계획에 의거 시천․단계 하수처리 구역을 확대할 계획이었으나 현재까지 사업 미시행으로 하천수질환경이 악화되고 있어 하수관거사업 시행으로 생활 오수를 적정 처리함으로써 양질의 수자원을 보전하여 농촌지역 공중위생 향상 및 주거환경 개선에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 천평리 및 신등면 단계리 일원

❍ 사 업 량 : 하수관거 설치 L=14.48Km

❍ 사 업 비

- 총사업비 : 6,431백만원(국비 70%, 기금 18%, 군비 12%)

⇒ 2015년 2,859백만원(국비 2,001, 기금 515, 군비 343)

❍ 사업기간 : 2014. 01. ~ 2016. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 09.             : 실시설계용역 완료

❍ 2014. 10. ∼ 2014. 12. : 재원협의

□ 추진계획

❍ 2015. 02. : 1차공사 착공

❍ 2015. 12. : 1차공사 준공

□ 기대효과

❍ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보와 수질개선에 기여

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
1차공사 시행 하수관로 설치			1차공사 시행 하수관로 설치			1차공사 시행 하수관로 설치			1차공사 마무리 및 준공

10. 산청공공하수처리시설 증설사업

처리구역확대 및 아파트 증가, 농공. 산업 단지 조성 등으로 계획 하수량이 시설 용량(2,800㎥/일)을 초과할 것으로 예상되고 또한 기존 하수 처리 구역 내 배수 설비 정비로 정화조 폐쇄로 인한 유입수질 농도 및 하수량이 증가하여 기존 하수처리시설의 용량부족으로 증설코자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 증설 1,000㎥/일(2,800㎥/일→3,800㎥/일)

❍ 사 업 비

- 총사업비 : 5,236백만원[국비(50%), 기금(30%), 도비(6%), 군비(14%)]

⇒ 2015년 1,000백만원(국비 500 , 기금 300, 도비 60, 군비 140)

❍ 사업기간 : 2015. 01. ~ 2016. 12.

□ 그간 추진사항

❍ 2014. 03. : 하수도 국고보조사업 신청

❍ 2014. 12. : 하수도 국고보조사업 선정

□ 추진계획

❍ 2015. 05. : 실시설계완료

❍ 2015. 06. : 설치인가 및 재원협의

❍ 2015. 07. : 1차공사 착공

❍ 2015. 12. : 1차공사 준공

□ 기대효과

❍ 하수처리시설의 효율적인 관리 및 운영

❍ 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 하천 수질보전

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
실시설계용역 착수			실시설계용역 완료 및 설치인가협의			1차공사 시행(40%) 하수처리장 증설			1차공사 마무리 및 준공

11. 공공하수처리시설 유지관리 및 운영

고효율 저비용의 공공하수처리시설 운영체계를 정착시키고 공정관리의 안정성과 전문성 확보를 위하여 전문업체에 관리 대행함으로써 공공하수처리시설 효율적 운영과 청정산청 이미지 제고에 기여하고자 함

□ 사업개요

공공하수처리시설(500㎥/일이상)					마을하수도(500㎥/일미만)					비고
시설수 (개소)	시설 용량 (톤/일)	치리 구역 (㎢)	치리 인구 (명)	관거 연장 (km)	시설수 (개소)	시설 용량 (톤/일)	치리 구역 (㎢)	치리 인구 (명)	관거 연장 (km)
3	5,200	2.176	11,824	69.08	44	3,089	7.9558	11,858	141.24

❍ 공공하수처리시설 관리대행 현황

- 대행업체 : 코오롱워터앤에너지(주)

□ 그간 추진사항

❍ 산청군 공공하수처리시설 민간관리대행 시행

⇒ 2014. 01. 01.～2018. 12. 31.(5년간)

□ 추진계획

❍ 산청군 공공하수처리시설 운영상황 확인 및 점검 : 매월실시

❍ 산청군 공공하수처리시설 관리대행실태조사

⇒ 년 1회이상 (2015. 5월경)

□ 기대효과

❍ 깨끗한 방류수질 확보로 환경 친화적 청정 산청의 이미지 제고

❍ 전문인력 운영을 통한 체계적인 정비 및 시설물 관리 최적화

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
하수처리시설 관리대행 실태확인 (25%)			하수처리시설 관리대행 실태확인(50%)			하수처리시설 관리대행 실태확인(75%)			하수처리시설 관리대행 실태확인(100%)