[별지5]10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명

제16회 산청한방약초축제

담당자

한방항노화실 배이성(☎970-6602)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역산업과 축제를 접목한 6차 산업화로 경남미래 50년 핵심전략산업인 한방항노화 산업을 미래 신성장산업으로 발전 가속화 및 산청한방약초 산업의 우수성 홍보와 한방약초, 힐링, 항노화 관련 산업과의 연계 강화로 지역 경제 활성화 및 주민소득 창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. 9. 30 ~ 10. 10

○ 위 치 : 산청군 금서면 동의보감촌

○ 규 모 : 전시, 체험, 문화예술 공연 등 120여개 프로그램

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,330백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,330	-	1,330	-	-
국 비	220	-	220	-	-
시 도 비	110	-	110	-	-
시군구비	1,000	-	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2016. 9. 30 ~ 10. 10 : 축제개최

○ 관람객 수 : 41만명

○ 판매수익 : 3,390백만원

○ 성    과 : 2017년 문화체육관광부 선정 최우수 축제

□ 향후계획 : 해당사항 없음

사업명

산청 토종홍화의 고부가가치화 사업

담당자

한방항노화실 윤경미(☎970-6612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 홍화를 기반으로 한 고부가가치 산업화 실현으로 부자산청 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014~2017(4년간)

○ 위 치 : 산청군 일원

○ 규 모 : 경상보조 4개 단위사업, 자본보조 2개 단위사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	2,038	537	425	-
국 비	1,500	725	400	375	-
시 도 비	180	87	69	24	-
시군구비	720	626	68	26	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	600	600	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 경상보조사업 추진

․ 사무국 운영 - 2명(국장, 사무원)

․ 역량강화 및 네트워크 구축 - 홍화 체험프로그램  교육 2식, 경영컨설팅 2회

․ 연구 개발 - 제품개발 11건, 특허등록 10건, 체험프로그램 개발2건

․ 홍보마케팅 - 박람회 및 전시회 참가 16회, 프랜차이즈 직영점 및 가맹점 11개소,                        브랜드 및 포장디자인개발 5건, 온라인 마케팅 등 226회

○ 자본조보사업 추진

․ 홍화현미분말 가공제조업소 신축공사 및 기계설비 1식

․ 홍화현미빵 기계구입 및 저온저장고 설비 1식

․ 홍화탈곡기 구입 및 저온저장고 설치 등 1식

․ 홍화차 장류 가공공장 및 전시체험장 신축 공사 및 기계구입 설비 1식

사업명

산청한방약초힐링타운육성사업

담당자

한방항노화실 윤경미(☎970-6612)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동의보감촌 등의 관광인프라를 바탕으로 한방약초힐링산업을 육성하여

지역경제 성장을 견인할 수 있는 기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013~2015(3년간)

○ 위 치 : 산청군 일원

○ 규 모 : 경상보조 4개 단위사업, 자본보조 2개 단위사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	3,000	2,731	269	-	-
국 비	1,500	1,280	220	-	-
시 도 비	180	153.6	26.4	-	-
시군구비	720	697.4	22.6	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	600	600	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :100%)

○ 경상보조사업 추진 완료

․ 사무국 운영 - 2명(국장, 사무원)

․ 역량강화 및 네트워크 구축 - 조직화 및 경영컨설팅 3회

․ 연구 개발 - 제품개발20건, 특허등록 8건, 지적재산권 출원

․ 홍보마케팅 - 소비자 초청상품설명회12회, 박람회 참가27회,

매체광고 18회, 힐링아카데미 교육 4회 추진

○ 자본조보사업 추진 완료

․ 힐링상품전시판매장 구축 1식

․ 힐링산업 체험전시장 제조업소 신축 공사 및 기계구입 설비 1식

․ 화장품제조시설, GMP 구축 및 연구시설 신축공사 1식 및 기계구입 설비 1식

․ 사무국 전시시설 및 환경개선설비 구축 1식

․ 초임계 등 기계설비 구축 1식

사업명

거함산 항노화휴양체험지구 조성사업

담당자

한방항노화실 이득화(☎970-6642)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서부경남의 지역특산물과 천혜의 청정한 관광자원인 동의보감촌의 기존       관광지내 관광자원을 활용한 테마형 한방약초 체험관광 거점개발로 지역       관광이미지 제고와 농가소득 증대를 통한 지역경제 활성화 기여

○ 최근의 여가 트렌드와 항노화․건강에 대한 소비자의 지속적인 욕구          (NEEDS)를 충족하기 위한 휴양체험 지구 조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 ~ 2019년

○ 위 치 : 산청군 금서면 특리 동의보감촌 일원

○ 규 모 : 85,047㎡ 항노화 휴양체험지구 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,700	0	151	2,509	7,040
국 비	4,850	0	30	1,100	3,720
시 도 비	1,455	0	36	423	996
시군구비	3,395	0	85	986	2,324
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 완공·운영 중인 시설 : 테마체험시설 쉼터(팔각정)

○ 공사 중인 시설 : 테마파크 물놀이장 편의시설설치

□ 향후계획

○ 2017년 테마파크조성 : 어린이 놀이기구 및 물놀이장, 구름다리(힐링교)

○ 2018년 테마체험시설 : 테마체험관, 산약초 재배지, 체험안내소 등

○ 2019년 수변공원조성 : 수생식물 군락지, 생태 탐방데크로드 등

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

동의보감촌 어드벤처시설 조성사업

담당자

한방항노화실 이득화(☎970-6642)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관람형 위주의 동의보감촌을 다양한 연령층이 체험과 동시에 힐링 할 수       있고 전통한방휴양관광지 특성에 맞는 4계절 활용가능한 다양한 한방체험

시설을 도입하여 동의보감촌 활성화를 도모코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2018년

○ 위 치 : 산청군 금서면 특리 동의보감촌 일원

○ 규 모 : 편백황토길 체험장조성(L=1.5km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	2,000	-	424	1,576	-
국 비	1,000	-	212	788	-
시 도 비	300	-	63	237	-
시군구비	700	-	149	551	-
지 방 채	0	-	0	0	-
민간자본	0	-	0	0	-
기 타	0	-	0	0	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 22%)

○ 완공·운영 중인 시설 : 편백나무 황토길 체험장조성(L=1.5km)

○ 공사 중인 시설 : 어린이 숲속놀이터조성

□ 향후계획

○ 어린이 숲속놀이터조성 및 주변 조경수 구입·식재 및 유지관리, 편의시설       확충 등

사업명

산청 전통한방휴양관광지 조성사업

담당자

한방항노화실 이창엽(☎970-6643)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통한방휴양관광지는 문화체육관광부「관광비전21-관광진흥 5개년계획」에

포함된 관광사업 중점 육성사업이며, 관광정책심의회에서 심의·의결을 거쳐

정부계획으로 확정되어 범정부적으로 추진하는 사업임

○ 역사·문화·자연자원을 바탕으로 전통한의학과 관광·휴양기능을 접목한 환경

친화적 관광지 개발을 통해 휴·요양을 겸한 국제적 건강명소를 조성하여

지역발전과 주민 소득원 확충의 새로운 전기 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2001년 ~ 2020년(20년)

○ 위 치 : 산청군 금서면 동의보감로555번길 45-6 일원

○ 규 모 : 294,998㎡ 관광지 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 73,828백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	73,828	67,128	1,400	650	4,650
국 비	18,135	17,135	500	125	375
시 도 비	5,440.5	5,140.5	150	37.5	112.5
시군구비	12,694.5	11,994.5	350	87.5	262.5
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	16,900	12,200	400	400	3,900
기 타	20,658	20,658	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

○ 완공·운영 중인 시설 : 도로, 전기·통신, 상·하수도, 정자 등 기반 및 편의시설,

엑스포 주제관, 산청한의학박물관, 전통의약체험관, 한방테마공원, 불로문,

관리사무소, 전망대등

○ 공사 중인 시설 : 조경 및 편의시설 설치 공사, 교통약자 보행 편의시설(경사형

엘리베이터)

□ 향후계획

○ 조경수 구입·식재 및 유지관리, 장애인등 교통약자 보행 편의시설 확충

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

- 당초 : 295,205㎡ 관광지 조성

- 변경 : 294.998㎡ 관광지 조성

○ 총사업비

- 당초 : 45,000백만원(공공 17,280, 민자 27,720)

- 변경 : 73,828백만원(국 18,135 도 5,440.5 군 12,694.5 민자 16,900 기타 20,658)

○ 사업기간

- 당초 : 2001년 ~ 2010년(10년)

- 변경 : 2001년 ~ 2020년(20년)

○ 변경사유 : 완벽한 관광지조성과 관광지운영 활성화를 위해 당초 계획된 사업에 비하여 도입 시설물의 변경 및 공공시설물 추가 설치

사업명

노인․장애인 복지관 건립

담당자

주민생활지원과 민병석(☎970-6501)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 노인 ․ 장애인에게 전문적, 체계적, 종합적 복지서비스 제공을        위한 종합 복지공간 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 4. 9. ~ 2016. 12. 7.

○ 위 치 : 경남 산청군 산청읍 중앙로 67

○ 규 모 : 지상3층(연면적 1,982.52m² / 건축면적 1,259.16m²)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,644백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,644	1,899	2,745	-	-
국 비	1,763	1,102	661	-	-
시 도 비	1,000	94	906	-	-
시군구비	1,881	703	1,178	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 건축준공 : 2016. 12. 7.

○ 주요시설 : 사무실, 프로그램실, 장애인목욕탕, 휴게실, 식당 등

□ 향후계획

○ 설치 및 운영 신고 : 2017. 1. 19.

○ 개 관 식 : 2017. 2. 28.

○ 위탁운영 : 사회복지법인 한일복지재단(대표자 김영태)

사업명

지리산 산청곶감 명품화사업

담당자

녹색산림과 김병일(☎970-6932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청곶감의 품질향상과 다양한 홍보활동 전개로 대외 인지도 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년~2016년(3개년)

○ 위 치 : 산청군 시천면 송하중태길 6(산청곶감유통센터 일원)

○ 규 모 : 유통센터 시설보강 외 11개 세부사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	4,800	3,400	1,400	0	0
국 비	2,400	1,700	700	0	0
시 도 비	288	204	84	0	0
시군구비	672	476	196	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	1,440	1,020	420	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 2014. 03. 26 : 사업추진계획 수립 및 시행

○ 2015. 10. : 공동감박피장 준공

○ 2015. 12. : 유통센터 시설보강(공동선별장), 홍보관 보수․보강

○ 2016. 12. : 곶감생산 기술 교육, 홍보 및 마케팅 추진

○ 2016. 12. : 청정건조시설 보급 등

□ 향후계획

○ 사후관리 철저 등

사업명

명상교 재가설공사

담당자

안전건설과

홍순일(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 교량상태가 D급 특정관리 시설물로 노후되어 있으며 집중 호우시 교량이 범람하여 지리산과 대원사를 찾는 관광객들의 안전사고 위험이 있어 교량을 재가설하여 주민불편사항을 해소하고 재해를 사전에 예방코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 16.08.16~17.08.25

○ 위 치 : 산청군 삼장면 평촌리

○ 규 모 : 교량재가설 L=52.0m, B=12.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	1,700	23	951	1,726	-
국 비	400	-	-	400	-
시 도 비	1,000	23	770	207	-
시군구비	1,300	-	181	1,119	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 가교철거(2017.07.24. ~ 07.28.)

○ 교량접속도로 가포장 완료(임시개통 : 7.21일 ~ 접속도로 포장 완료시)

□ 향후계획

○ 8월말 접속도로 포장 완료 계획

사업명

생비량지구 지방상수도 인입공사

담당자

상하수도사업소 박종서

(☎970-7012)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생비량면 일원은 소규모수도시설에 의존하고 있으나 최근 기후 변화등으로       인하여 수질불량 및 원수부족등의 문제로 상수도 이용에 어려움이 있어       지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급       하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 12 ~ 2019.  2

○ 위 치 : 산청군 생비량면 일원

○ 규 모 : 배수지 300톤, 관로 77.1km, 가압장 4개소, 전기설비 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,951백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	13,951	2,880	1,143	6,858	3,070
국 비	9,766	1,300	800	4,800	2,866
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,185	1,580	343	2,058	204
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘16. 12월  : 본공사 2차분 준공

○ ‘16. 12월  : 폐기물처리용역 2차분 준공

○ ‘16. 08월 ~ ’17. 03월  : 건설사업관리용역 1차분 준공 및 2차분 착공

○ ‘17. 01월 ~ 현재  : 공사 3차분 및 폐기물처리용역 3차분 추진중

□ 향후계획

○ ‘18.  06월  : 본공사 3차분 준공 및 폐기물처리용역 준공예정

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

구 분	당 초	변 경	증	비고
사업기간	′14. 1 ~ ′17.12	′14. 1 ~ ′19. 2	- 증 14개월
사업내용	- 관로 42.2km - 가압장 1개소 - 배수지 0개소 - 토지보상 (배수지신설):-㎥ -폐기물처리:-km	- 관로 77.1km - 가압장 4개소 - 배수지 1개소 - 토지보상 (배수지신설):303㎥ -폐기물처리:77.1km	- 증 34,9km - 가압장 3개소 - 배수지 1개소 - 증 303㎥ - 폐기물 77.1km
총사업비	- 8,180백만원 ·국 5,726(70%) ·군 2,454(30%)	- 13,951백만원 ·국 9,766(70%) ·군 4,185(30%)	- 증 5,771백만원 ·증 국 4,040 ·증 군 1,731

사업명

시천·단계지구 하수관로 정비사업

담당자

상하수도사업소 김광웅

(☎ 970-7023)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시천면 및 신등면 중심소재지 하수처리구역으로서 하수관거 미설치로 인한 농촌마을의 무분별한 오염원이 배출되고 있어 금회 하수관거를 설치하여 생활오수를 적정 처리함으로써 지역사회의 균형발전과 공중위생 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014.01.~2017.06.

○ 위 치 : 경상남도 산청군 시천면 및 신등면 일원

○ 규 모 : 하수관거 정비(L=14.46km), 배수설비 306가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,296백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2016년	2017년	2018년 이후
계	9,296	3,287	6,009	-	-
국 비	6,507	2,301	4,206	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,209	488	721	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,580	498	1,082	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘14. 01.~09. : 실시설계용역 착수

○ ‘14. 09. : 실시설계용역 완료

○ ‘14. 10.~12. : 재원협의

○ ‘15. 03. : 계약심사

○ ‘15. 04. : 공사 착공

○ ‘17. 06. : 공사 준공

○ 현재 추진율 : 100%

□ 향후계획

○ 해당없음