109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 산청군에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021년 집행사업비	2022년	2023년 이후
신재생에너지 융복합지원사업	2,926	-	-	2,926	-	2022	2021	40
가공선로 지중화사업	5,600	미	시	행	5,600	2023	2021	-
산청시장 주변 공영주차장 조성사업	4,433	-	-	4,,33	-	2022	2021	30
산청스마트쉼터 머뭄 조성사업	3,656	-	2,550	1,106	-	2023	2021	15
소둔철~둔철간 도로 확포장공사	4,500	-		500	4,000	2024	2021	5
매촌지구 도시개발사업	18,000	1,250	1,420	5,000	10,330	2025	2020	20
특리지구 관광체험시설 부지조성	7,000	-	1,500	3,000	2,500	2023	2021	50
단성 유림회관 건립사업	2,000	-	82	1,918	-	2022	2021	90
백두대간 생태축 복원사업	5,810	-	-	1,249	4,561	2024	2021	15
산청 황매산 자연휴양림 조성사업	9,200	50	50	550	8,600	2025	2021	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘21년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘21년말 기준으로 작성

※ 담당자 연락처, 필요성, 사업개요, 총사업비(재원별), 추진상황, 향후계획, 사업변경 내역 등 순서에 따라 필히 기재

※ 대상사업 중 “의뢰심사”(광역은 중앙, 기초는 중앙 및 시도 의뢰)사업은 의무공시, “자체심사”사업은 사업규모(금액)이 크거나 중요한 사업 등에 대해 자율적으로 대상사업을 선정 공시(최소 10건 이상)

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

신재생에너지 융복합지원사업

담당자

경제교통과 김동준(☎970-6822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 관내 다수 지역민들의 에너지 복지혜택 및 범정부 차원의 2030탄소

제로화 조기 달성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 산청군 삼장면, 시천면, 단성면 일원

○ 규 모 : 태양광 249개소(1,177KW), 태양열 57개소(337㎡), 지열 2개소(227.5KW)

BIPV 1개소(24.4KW)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,926백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,926			2,926
국 비	1,497			1,497
시 도 비
시군구비	1,104			1,104
지 방 채
민간자본	325			325
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 협약체결(산청군 ↔ 컨소시엄 대성파인텍 등)            : 2022. 02.

○ 사업추진 중                                          : 2022. 03. ~

□ 향후계획

○ 사업완료                                            : 2022. 11.

○ 사업정산                                            : 2022. 12.

사업명

가공선로 지중화사업

담당자

경제교통과 김동준(☎970-6822)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청읍 소재지 주변에 무분별하게 설치되어 있는 전신주 및 통신주의

지중화로 통학로 안전거리 확보 및 관광산청 이미지 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 산청읍 소재지 일원

○ 규 모 : 산청경찰서~경호지구대(400m), 산청우체국 ~ 영남장(300m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,600				5,600
국 비	1,120				1,120
시 도 비	1,680				1,680
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타	2,800				2,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 2023년 그린뉴딜 지중화사업 신청                       : 2022. 06.

□ 향후계획

○ 산청읍 소재 지중화사업 협약체결(사업선정시)            : 2023. 02.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2022. 1. ~ 2023. 12

- 변경 : 2023. 1. ~ 2024. 12

사업명

산청시장 주변 공영주차장 조성사업

담당자

경제교통과 이경용(☎970-6834)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청읍 주거 밀집 지역과 전통시장 주변 불법 주차해소 및 관광객 주차 편의 제공으로 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 01. ~ 12.

○ 위 치 : 경상남도 산청군 산청읍 산청리 237 외 6개 필지

○ 규 모 : 주차장 조성 2,714㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,433백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,433	0	0	4,433	0
국 비	1,741	0	0	1,741	0
시군구비	2,692	0	0	2,692	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 지방재정투자 심의                                : 2021. 1월

○ 공유재산 관리계획 심의                           : 2021. 2월

○ 본예산 확정                                      : 2021. 12월

○ 토지매입 보상 협의(2022. 1. ~ 7. 11.)               : 16회

○ 보상 협의계약 체결 추진                          : 2022. 8월 ~ 현재

□ 향후계획

○ 토지매입 보상 협의 계약 후 토지 등기 및 보상금 지급 추진      : 2022. 9월

○ 조사측량 및 실시설계용역 시행                             : 2022. 9월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경내역

구 분		당초 계획	감정평가 결과	사업비 변경(안)	비 고
매입면적		2,714㎡(821평)	2,714㎡(821평)	2,714㎡(821평)
사업비	계	3,700	4,433	4,433	증 733
	보 상 비	3,200	3,933	3,933	증 733
	주차장 조성비	500	500	500

사업명

산청스마트쉼터 머뭄 조성사업

담당자

건설과 백현기(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경호강의 자연경관과 지역의 역사문화 관광자원을 활용할 수 있는

쉼터조성을 통해 안전하고 쾌적한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2023

○ 위 치 : 산청군 생초면 신연리 산92-7번지 일원

○ 규 모 : 스마트 쉼터 1식(부지면적 15,865㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,656백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,656		2,550	1,106
국 비	2,156		1,250	906
시 도 비
시군구비	1,500		1,300	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2021. 4. 16.        : MOU체결(진주국토, 산청군)

○ 2021. 7. ~ 2021. 10. : 조사측량 및 실시설계용역

○ 2021. 8. ~ 2021. 11. : 소규모재해 영향평가 실시

□ 향후계획

○ 2022.  6. ~ 2022. 12. : 기반시설 조성사업(토목) 착공 및 준공

○ 2022. 10. ~ 2022. 12. : 도로이설 실시설계용역

○ 2022. 11. ~ 2023. 12. : 스마트복합쉼터(건축) 공사착공 및 준공

○ 2024. 1. : 스마트복합쉼터 준공 이후 관리ㆍ운영 이관(국토교통부→산청군)

사업명

소둔철~둔철간 도로 확포장공사

담당자

건설과 백현기(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 귀촌인구의 증가로 늘어난 차량통행에 원활을 기하고 인근 주민들의 생활

환경개선에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 산청군 신안면 안봉리 917-1번지 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.92Km, B=6.5m(8.0m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,500			500	4,000
국 비
시 도 비
시군구비	4,500			500	4,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 12  : 2022년도 도로사업 실시설계비 예산 확보(500백만원)

□ 향후계획

○ 2022. 2. ~ 2022.  6. : 조사측량 및 실시설계용역 착공 및 준공

○ 2022. 6. ~ 2022. 12. : 토지보상 협의 및 행정절차 이행

○ 2023. 1. ~ 2024. 12. : 공사 착공 및 준공 예정

사업명

매촌지구 도시개발사업

담당자

지역발전과 송병기(☎7332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 귀농, 귀촌자들의 택지 수요가 증가하여 안정적인 택지공급에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2025년

○ 위 치 : 금서면 매촌리 615-1번지 일원

○ 규 모 : A=75,838㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,000	1,250	1,420	5,000	10,330
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	18,000	1,250	1,420	5,000	10,330
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 4월: 도시개발구역지정(개발계획수립) 및 실시설계용역 시행

○ 2020. 8월: 도시계획위원회 사전 자문

○ 2021. 3월: 도시개발구역지정 및 개발계획(안) 군 입안

○ 2021. 4월: 주민공람 및 사업인정관련 의견청취

○ 2021. 8월: 도시개발구역지정 및 개발계획 신청(산청군→경상남도)

○ 2022. 7월: 경상남도 경관위원회 경관심의

□ 향후계획

○ 2022.10월: 경상남도 도시계획위원회 심의

○ 2022.12월: 도시개발구역 지정 및 개발계획수립 고시

○ 2023. 1월: 실시설계용역 착수

○ 2023. 7월: 실시계획인가 고시 및 사업착수

○ 2025. 8월: 준공 및 분양계획 수립

사업명

특리지구 관광체험시설 부지조성사업

담당자

한방항노화과

김광웅(☎970-6642)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동의보감촌의 부족한 부지 및 인프라를 확보하여 다양한 계층의 방문객들에게 볼거리와 체험거리를 제공하여 한방항노화 산업 및 관광지 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2023년

○ 위 치 : 경남 산청군 금서면 특리 산59번지 일원

○ 규 모 : 부지 조성 A=62,250㎡

(공공용지 19,121㎡, 관광휴양시설용지 19,606㎡, 녹지용지 23,523㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	7,000	0	1,500	3,000	2,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 부지조성공사 착공         : 2021. 10월

○ 사유지(38필지) 보상 완료　 : 2021. 5월

□ 향후계획

○ 부지조성공사 준공          : 2023. 9월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

단성 유림회관 건립사업

담당자

문화체육과 송병율(☎970-6403)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군민의 유교문화 교육에 대한 수요 충족 및 산청 유림의 교류 활성화를 통한 산청 선비문화의 계승ㆍ발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 4. ~ 2022. 9.

○ 위 치 : 산청군 단성면 성내리 146번지 일원

○ 규 모 : 유림회관 A=213.88㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000		82	1,918
국 비
시 도 비	1,000		82	918
시군구비	1,000		0	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 지방재정투자심사 승인                 : 2021. 04.

○ 공유재산 변경 관리계획 승인           : 2021. 05.

○ 기본 및 실시설계 용역                 : 2021. 07. ~ 2021. 11.

○ 사업 착공                             : 2021. 12. ~

□ 향후계획

○ 2022. 9월말 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 건축면적 변경(당초 200㎡ → 변경 213.88㎡)

사업명

백두대간 생태축 복원사업

담당자

산림녹지과 정진근

(☎970-6913)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민족의 영산 지리산과 웅석봉 군립공원을 연결하는 백두대간 생태축의 복원을 통해 생물다양성 증진 및 민족의 정기성 회복에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2024년

○ 위 치 : 산청군 삼장면 홍계리 산110-3번지 밤머리재 일원

○ 규 모 : 구조물설치 1개소(B=14m, L=50M), 식생기반토 성토, 자생식물 식재 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,810백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,810	-	-	1,249	4,561
국 비	4,067	-	-	874	3,193
시 도 비	523	-	-	112	411
시군구비	1,220	-	-	263	957
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 타당성평가용역 완료 : 2021. 8월

○ 실시설계용역 착수 : 2022. 4월

□ 향후계획

○ 실시설계 및 각종 인허가 협의 완료 : 2022. 12월

○ 사업추진 : 2023 ~ 2024년

사업명

산청 황매산 자연휴양림 조성사업

담당자

산림녹지과 박동진(☎970-6943)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 최대 철쭉 자생 군락지인 황매산에 자연휴양림을 조성하여 아름다운 황매산의 사계절을 감상할 수 있는 산림휴양지 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 경남 산청군 차황면 법평리 산1번지 일원

○ 규 모 : 60ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,200		50	550	8,600
도비(전환)	4,300				4,300
도비(자체)	1,290				1,290
군 비	3,610		50	550	3,010
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 자연휴양림 지정           : 2022. 2. 15.

○ 기본계획 및 실시설계 실시 : 2022. 5. ~ 2023. 3

□ 향후계획

○ 2023. 1. ~ 2.        : 자연휴양림 조성계획 심사 및 승인

○ 2023. 3. ~ 2025. 12. : 자연휴양림 조성 사업 추진

10-2. 지방채 발행사업 : 해당사항 없음

10-3. 민간투자사업 : 해당사항 없음