엑스포 주행사장 조성지원

2013산청세계전통의약엑스포 주행사장이 동의보감촌으로 결정됨에 따라 체계적인 기반시설 정비를 통해 차질 없는 주행사장 조성으로 성공적인 엑스포 개최 지원

□ 전통의약체험관 건축마무리 및 주변정비

◦ 위    치 : 동의보감촌내 전통한방휴양관광지

◦ 기    한 : 2013. 4월

◦ 내    용 : 전통의약체험관 등 부대건축물 건축마무리

□ 주행사장내 통신회선 추가설치

◦ 위    치 : 동의보감촌내 전통한방휴양관광지

◦ 기    한 : 2013. 4월

◦ 내    용 : 광케이블 포설 L=1.1km

□ 보안등 ․ 가로등 교체 및 추가설치

◦ 위    치 : 동의보감촌내 전통한방휴양관광지

◦ 기    한 : 2013. 5월

◦ 내    용 : 기존 보안등 및 가로등 교체 및 추가신설

□ 한방테마공원내 기존시설물 정비

◦ 위    치 : 동의보감촌내 전통한방휴양관광지

◦ 기    한 : 2013. 6월

◦ 내    용 : 시설물 정비․도색, 연못청소, 조경수목정비 등

□ 분기별 추진

사업명	1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
전통의약체험관 건축마무리
통신회선 설치
보안등․가로등 교체 및 추가설치
한방테마공원내 시설물 정비

한국선비문화연구원 건립

한민족의 올바른 정신과 가치관을 후손에게 전승하고, 청소년 세대에게 선비정신과 선비문화를 전수하여, 미래사회를 이끌어갈 새로운 정신적 좌표마련

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 시천면 사리 900-27번지 일원 (남명유적지내)

◦ 사 업 량 : 35,727㎡(건축면적 : 9,063㎡)

◦ 사 업 비 : 19,800백만원 (국비 9,900 / 지방비 9,900)

◦ 사업기간 : 2008년 ~ 2013년(6개년)

◦ 사업내용 : 연구연수동(4,369㎡), 연수숙박동(3,620㎡), 전통숙박시설외 8(1,074㎡)

□ 그간 추진사항

◦「한국선비문화연구원」 설립 발기인 총회 : 2007. 2월

⇒ 추진위원장 : 이현재(덕천서원 원장, 전 국무총리)

◦「한국선비문화연구원」건립 기본계획 용역 : 2007. 2월(경남발전연구원)

◦ 문중에서 부지매입 대금 10억원 사재출연 : 2009. 4월

◦「한국선비문화연구원」건립 실시설계 용역 완료 : 2010. 2월

◦「한국선비문화연구원」건립공사 기공식 : 2010. 8월

◦「한국선비문화연구원」연수연구동 준공 : 2012. 6월

◦「한국선비문화연구원」연수숙박동 착공 : 2012. 9월

□ 추진계획

◦「한국선비문화연구원」부대시설 사업발주 : 2013. 3월

◦ 연수숙박동 준공 : 2013. 10월

◦ 옥내체험시설 및 부대시설 준공 : 2013. 12월

□ 기대효과

◦ 선비정신을 바탕으로 한 정신문화혁신 기여 및 선비문화 관광인프라 구축

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업시행(30%)			사업시행(60%)			연수숙박동 준공(100%)
기타 부대시설 발주			사업시행(20%)			사업시행(60%)			준공(100%)

남사 전통한옥 체험마을 조성

전통 한옥마을로서 가치를 지니고 있고 지역주민의 관광개발 의지가 높은 남사마을을 복합형 전통 한옥문화촌으로 정비하여 역사와 문화가 조화된 여가공간으로 조성

□ 추진방향

◦ 전통 한옥 공동 이용 편의시설(향토음식체험관 등) 우선 건립

◦ 문화재급 이거나 보존가치가 있는 전통한옥 선별 정비

◦ 공가 및 국도 가시권 현대식(노후) 건물 정비 후 조경 등 휴게공간조성

□ 사업개요

◦ 위    치 : 산청군 단성면 남사리 277번지 일원(남사마을 82,000㎡)

◦ 사 업 량 : 향토음식체험관, 국도가시권정비(주창장 및 조경시설),

노후한옥정비 50여동, 마을안길정비

◦ 사 업 비 : 9,704백만원(국비 4,794 /지방비 4,910)

◦ 사업기간 : 2009년 ~ 2014년(6년간)

□ 그간 추진사항

◦ 기본계획 수립 및 실시설계 용역 발주 : 2009. 3월

◦ 마을 추진위원회 회의 : 2009. 9월

◦ 물레방앗간 및 찻집지붕 산죽잇기 완료 : 2010. 12월

◦ 향토음식체험관 준공 : 2011. 9월

◦ 전력간선 지중화사업 승인 : 2012. 6월

□ 추진계획

◦ 전력간선 지중화사업 및 마을안길포장공사 : 2013. 12월

◦ 노후한옥 정비사업(대상가옥중 단계별 정비) : 2013. 1월~12월

◦ 야외이벤트장 조성(보상협의완료부지) : 2013. 5월

□ 기대효과

◦ 남사마을의 전통한옥을 체계적으로 정비하여 지역기반형 농촌 체험

관광과 연계, 농가소득 증대 및 관광자원화

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
편입부지 보상(협의)			사업진행(40%)			사업진행(80%)			사업마무리 (100%)

문화예술행사를 통한 범군민 엑스포 참여분위기 조성

문화예술 행사의 내실 있는 개최와 유치로 엑스포 성공을 위한 범 군민적 붐 조성과 공감대 확산

□ 추진방향

◦ 엑스포와 연관된 지역문화예술 공연프로그램 유치지원으로 범군민이

참여하는 엑스포 성공분위기 조성과 엑스포 성공개최

◦ 지역별 안배를 통한 지역 문화예술프로그램 유치지원

□ 사업개요

구 분	시 기	장 소	주요내용	비 고
엑스포 성공 개최기원 음악회	2월중	산청체육센터 및 창주강변	초청공연, 엑스포홍보 군민참여 붐조성	정월대보름 달집태우기 행사 병행
우수예술단체 시군순회공연 지원사업 유치	엑스포 기간중	엑스포 행사장내	연극,무용,음악,전통 등
국악공연	엑스포 기간중	엑스포 행사장내 및 남사예담촌	국악중심의 소규모 공연(상설)
기타 소규모공연	년중	관 내	한여름밤음악회, 두류 음악회, 기타 공연

□ 추진계획(엑스포 조직위 협의)

◦ 공연추진 기본계획 수립 : 2013. 1월

- 초청공연 프로그램 등 다양한 의견수렴 및 방침결정

◦ 우수예술단체 시군순회공연 신청․유치 및 세부추진계획 수립 : 2013. 2월

◦ 성과분석 및 평가 : 2013. 11월 ~ 12월

□ 기대효과

◦ 수준 높은 우수문화예술공연 행사 유치로 범군민적 엑스포 성공

분위기 조성

◦ 지역단위 문화예술행사 내실 운영으로 동참분위기 유도

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
기본계획 수립(20%)			공연선정 및 세부추진 계획수립 (50%)			문화예술 공연(80%)			사업 정산(100%)

적극적 실효성 있는 스포츠마케팅

여론 형성층과 동호인들이 참석하는 전국 및 도단위 스포츠 대회를 적극 개최 및 전지훈련팀 유치로 2013년 엑스포 홍보 및 지역경제 활성화 기여

□ 추진방향

◦ 스포츠 마케팅을 통한 2013 산청세계전통의약엑스포 홍보

◦ 각종 체육동호회 육성과 지역경제 활성화 도모

□ 대회개요

대 회 명	시 기	장 소	참 여	비 고
전국 남여궁도대회	2013. 6~7월경	청호정	3,000여명
도지사기 전국래프팅대회	2013. 7~8월경	래프팅타운	1,500여명
전국 오픈탁구대회	2013. 5월경	산청체육센터	2,000여명
전국대학 및 전국실업 유도선수권대회	2013. 9월경	실내체육관	3,000여명
도지사기 테니스대회	2013. 9월경	공설테니스장	1,000여명
전지훈련팀 유치	년중	공설운동장 외 다수	1,000여명

□ 기대효과

◦ 2013년 엑스포 홍보 및 지역경제 활성화 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
대회준비 자료수집			대회준비, 경기장정비			래프팅대회 및 각종대회 개최			전지훈련팀 유치등

공공체육시설 확충사업 내실추진

공공체육시설 설치사업을 차질없이 추진하여 군민들의 건강증진 도모와 각종 대회 개최 및 전지훈련 유치 등으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

◦ 위    치 : 생초면, 신안면, 시천면

◦ 사 업 비 : 14,560백만원 (생초 2,060, 남부 8,000, 시천 4,500)

◦ 사업기간 : 2011년 ~ 2014년

◦ 사업규모 :

☞ 생초제2축구장 : 인조잔디 축구장 1면

☞ 남부생활체육공원 : 체육공원 A=37,520㎡(축구장, 풋살경기장,

다목적구장, 그라운드골프장)

☞ 시천생활체육공원 : 체육공원 A=22,662㎡(축구장, 게이트볼장, 테니스장)

□ 그간 추진사항 및 추진계획

구 분	2012년까지	2013년	2014년
생초제2축구장	▪11.03 군관리계획변경 용역 ▪11.07 실시설계 용역 ▪12.04 토목공사 발주(현진도 60%) ▪12.07 군관리계획변경 결정	▪13.04 준공
남부생활체육공원	▪08.09 타당성 및 기본계획용역 ▪10.04 군관리계획 변경 용역 ▪11.11 실시설계 용역 ▪11.12 토목공사 착공	▪13.06 준공
시천생활체육공원	▪10.01 기본계획 및 타당성조사 ▪10.11 지방재정투융자심사 ▪11.02 편입토지 보상금지급 통보 ▪12.04 산청군 관리계획(변경)용역	▪13.04 기본/실시 설계용역 시행	▪ 착공

□ 기대효과

◦ 생활체육의 저변확대 및 전지훈련팀 유치 등으로 지역경제 활성화 도모

□ 분기별 추진

구분	1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
생초
신안
시천
계획	구조물공 및 군관리계획변경			포장․부대공 및 실시설계용역			조사 및 측량 설계도서작성			보고서 작성 및 설계완료

국가 및 도 지정 문화재 보수사업 추진

노후ㆍ훼손된 지정 문화재를 체계적으로 보수, 문화재 보존관리에 만전

□ 추진방향

◦ 국가 및 도지정 문화재 보수시 원형보존을 최우선으로 하고, 문화재

개별 특성에 따라 보존관리

□ 사업개요

구 분 (문화재)	사 업 명	사 업 비(백만원)
		계	국비(분권)	도비	군비
계	14건	1,649	982	233	434
국가지정	대원사 청풍요 번와보수 외 7개소	1,129	722	142	265
도지정	도전리 마애불상군 진입 도로 개설외 5개소	520	260	91	169

◦ 2013.  3월 : 문화재청(경상남도) 사업지침 조사 확정 및 용역발주

◦ 2013.  6월 : 사업발주 및 착공, 착수 보고(군→문화재청, 도청)

◦ 2013. 11월 : 완공 및 완료보고(군→문화재청, 도청)

□ 그간 추진

◦ 2012.  5월 : 국․도비 문화재, 전통사찰 보수사업 신청

◦ 2012. 11월 : 사업대상 가내시 및 확정내시

◦ 2012. 12월 : 2013년도 예산 편성

□ 추진계획

◦ 설계용역 조기 발주 및 설계승인 신청(산청군→문화재청, 도청)

◦ 설계승인(문화재청, 도청→산청군) 및 사업조기 발주(산청군)

□ 기대효과

◦ 귀중한 문화유산의 체계적 보수․정비로 후손에게 물려주고 탐방객

볼거리 제공

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계발주 및 설계승인, 사업발주(40%)			사업발주 및 착공 착수보고(40%)			사업마무리 및 준공(20%)

산청이미지UP 집중홍보 전략 지속 추진

2013 산청세계전통의약엑스포 홍보와 연계하고 관광수요 증가에 따른 관광패턴의 다양화에 대응하여 통상적 홍보 전략에서 탈피, 차별화된 관광홍보 활동 전개로 산청이미지 제고 및 효과 극대화

□ 추진방향

◦ 다양하고 전략적인 관광홍보 마케팅 전개로 관광객 적극 유치

◦ 산청이미지를 확실하게 각인시킬 수 있는 차별화된 관광홍보 활동전개

□ 추진계획

◦ 시    기 : 년중

◦ 대    상 : 수도권 및 대도시권 중심으로 전국단위

◦ 범    위 : 계절별 관광이미지․축제․행사 등을 테마별로 구분 홍보

◦ 홍보방법

- 수도권 겨냥 대형 옥외전광판 동영상광고 : 서울역 앞, 서울강남대로

- 와이드 광고 : 제주공항, 김포공항, 김해공항, 강남역사내, 남부터미널 내

- 대도시를 겨냥한 지하철 광고 : 서울, 부산, 대전, 대구, 광주

- 버스 외부광고 : 진주↔서울간 시외버스 20대, 관광버스 15대

- 산청관광, 주요행사 대중매체 홍보 : 신문, 라디오 등 주요매체 홍보

- 인터넷 홍보 : 주요사이트 배너 게첨, 홈페이지 링크 등

□ 기대효과

◦ 2013 산청세계전통의약엑스포 홍보를 극대화 하고 우리군 우수한       문화관광명소 및 휴양․웰빙의 이미지를 대외적으로 홍보

◦ꡐ관광산청ꡑ이미지 제고를 통한 관광객 유치 증대로 지역경제 활성화도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
홍보전략에 따른 사업시행(50%)			사업진행(70%)			사업진행(90%)			사업마무리 (100%)

다시 찾고 싶은「관광산청」홍보 마케팅추진

2013 산청세계전통의약엑스포를 성공적으로 개최하기 위한 홍보와 급변하는 관광환경 변화에 대응하고 관광안내 및 관광정보의 신속한 제공으로 산청군 이미지를 부각시켜 국내외 관광객 유치 증대 및 지역경제 활성화 도모

□ 추진방향

◦ 관광정보 ․ 관광안내자료의 신속한 제공과 성의 있고 흥미있는 해설       로 우리군의 신뢰도 및 이미지 제고

◦ 체계적인 관광안내로 관광객 편의 제공 및 서비스 만족도 제고

◦ 관광객 체류시간 증가 및 재 방문 유도로 관광수요 증대

□ 추진계획

◦ 다양한 관광안내 홍보물 제작 활용

- 다국어 관광안내지도 제작(한국어, 영어, 일어, 중국어)

- 2014년 관광홍보달력 제작

- 관광기념품 제작(3종이상), 팜플렛 제작(2종이상)

- 활용 : 관광관련업체, 지역축제행사, 각종 군단위행사, 타기관방문

박람회행사참석, 전국휴게소 등 다중집합시설 등

◦ 관광표지안내판 신설 및 개보수 사업(다국어표기 병행) : 10개소

◦ 스마트폰 모바일 웹 활용 홍보 강화 : 산청여행애플리케이션다운받기, QR코드 활용

◦ 관광박람회 참가(경남 공동부스 참가 2회)

◦ 관광 팸투어 및 설명회 개최 : 국내외 여행사 및 언론사 등 초청

◦ 문화관광해설사 운영 활성화 및 능력배양을 위한 자체연찬회 개최 및       우수지역 비교견학

□ 기대효과

◦ 산청관광의 만족도 향상 및 산청의 이미지 제고 기여

◦ 관광산청의 잠재력 확인 및 군정에 대한 올바른 이해와 자긍심 고취

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
홍보전략에 따른 사업시행(50%)			사업진행(70%)			사업진행(90%)			사업마무리 (100%)

단체관광객 유치 여행사 인센티브제 운영

우리 군의 우수한 문화관광 자원을 국내외에 널리 알리고 관광산업 활성화를   도모하기 위하여 단체관광객 유치 여행사에 대해 인센티브제 도입 ․ 운영

□ 추진방향

◦ 문화유적지 및 관광명소를 상호 연계한 관광자원 홍보

◦ 실질적 관광객 유치 성과 거양

□ 추진계획

◦ 기      간 : 2013. 3월 ~ 12월(해당 예산 소진시까지)

◦ 신청대상자 : 관광진흥법 제3조 및 제4조의 규정에 의한 여행업 등록을 필한 여행업체

◦ 지원기준(내국인 20명, 외국인 10명 이상)

- 내국인 : 20명 기준 1명당 당일 5천원/1박 10천원/2박 20천원/3박이상 25천원

※ 단, 수학여행 학생의 경우에는 상기 기준의 50%를 지급

- 외국인: 10명기준 1명당 당일 10천원/1박 15천원/2박 20천원/3박

이상 25천원

- 버스임차비 지원 : 내국인 20명이상, 외국인 10명이상 1일당 100천원

◦ 관광 및 숙박시설 확인

- 당일관광 : 음식업 대표

- 숙    박 : 숙박업소 대표

◦ 보상금 신청 및 지급절차

- 사전 관광 신고 및 관광․숙박이용확인서를 첨부 지급신청

- 관광 및 숙박사실 현지 확인후 보조금 지급

◦ 음식 ․ 숙박업소에 대한 조치

- 관내 전 음식점, 숙박업소 동 계획 및 준수사항 공문 발송

- 군 음식업 지부, 숙박업소 대표 자체 위생, 친절교육 실시협조 요청

◦ 소요예산 : 10,000천원

□ 기대효과

◦ 우수한 관광자원의 국내외 홍보 및 관광객 유치 증대로 관광산업 활성화 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업 계획 시행 (40%)			사업시행 (70%)			사업마무리 및 준공 (100%)

문화관광축제 엑스포 연계 개최

우리군의 대표적인 각종 축제를 2013 산청세계전통의약엑스포 시기에 집중 개최하여 관광객 유인 및 엑스포 성공 개최 기여

□ 추진방향

◦ 대표적 문화관광축제 개최 시기조정 ⇨ 엑스포 기간 중 개최

◦ 축제내용 조정(반영) ⇨ 전통과 한의약을 연계한 내용 반영

◦ 산청의 전통과 특성, 아름다움 적극홍보 ⇨ 특색 있는 프로그램 개발

□ 행사개요

축 제 명	시 기	장 소	주요내용	소요예산	비고
제7회 기산국악제전	2013.10월중	엑스포행사장 및 남사예담촌 등	추모제례,국악상시상,국악 공연,전국국악경연대회 등	100백만원
제37회 남명선비문화축제	2013.10월중	남명기념관, 덕천서원 일원	전통제례,의병출정,선비문화 체험 등	130백만원
제5회 불교문화제전	2013.10월중	겁외사 일원	불교제례,산사음악회,체험 행사 등	60백만원
제40회 지리산평화제	2013.10월중	엑스포행사장 및 지리산 등	산신제례,평화상시상,문화 예술 음악회 등	55백만원

□ 추진계획

◦ 축제별 기본계획 수립 및 보조사업자 선정 : 2013. 2월

◦ 축제참여기관 등 협의 세부추진계획 수립 : 2013. 3월 ~ 5월

◦ 축제 홍보 및 사전준비 등 : 2013. 6월 ~ 9월

◦ 축제 행사추진 : 2013. 10월

□ 기대효과

◦ 산청의 특색 있는 문화관광자원을 통한 엑스포 성공개최 지원 및 군민적

자긍심 고취

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
기본계획수립 및 행사프로그램 확정(50%)			축제 홍보 및 사전준비 (70%)			축제 행사추진(80%)			사업 정산(100%)