주민생활지원실 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2015년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(주민생활지원실)

□ 총    평

❍ 군 소유 부지(구.보건의료원)를 활용한 적정 규모의 노인․장애인 복지관을 건립하여 수요계층의 복지욕구에 적합한 서비스 제공

❍ 공원화사업 추진 등으로 화장수요에 효과적 대응 및 장사시설 이미지 개선

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	2	0	2	0	0
군 수 공 약 사 업	1	0	1	0	0
주요시책사업	1	0	1	0	0

□ 주요성과

❍ 노인장애인복지관 신축건물 3층 바닥까지 콘크리트 타설 완료

❍ 제2본향원 앞 주차장포장 및 차폐 조경공사(수목이식) 완료

□ 반    성

❍ 복지관 부지 지반약화로 인한 기초파일시공으로 공사기간 5개월 지연

❍ 산청군관리계획(용도지역 봉안시설) 변경 등 행정절차 이행에 따른       사업추진 다소 지연

□ 향후 추진계획

❍ 복지관설치 및 운영 조례 제정, 운영계획 결정(위탁 등)

❍ 수탁기관 선정 및 집기구입, 복지관 개관(20116년 8월경)

❍ 군 관리계획 변경 등 행정절차 이행

❍ 친환경주차장설치, 배수시설 및 순환도로 개설 등 공원화사업 추진

구 분	공약사업
담당부서	주민생활지원실(희망복지담당)
추진진도(%)	27%

3

산청군 노인․장애인 복지관 건립

❖ 노인 및 장애인의 종합복지 공간이 전무하여 수요계층 불편 초래

❖ 구)보건의료원 부지를 활용한 복지관 건립으로 군민의 복리증진      및 건강한 삶의 질 향상 추구

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 산엔청로 67(舊 보건의료원)

❍ 추진기간 : 2014. 1 ~ 2016. 06

❍ 사 업 량 : 건물 1동 신축

- 부지면적 : 3,366㎡

- 건물 연면적(건축면적) : 1,982.52㎡(1,259.16㎡) /지상3층

❍ 사 업 비 : 4,644백만원(분권844 기금919 도비1,000 군비1,881)

□ 추진사항

❍ 2013. 05월 : (구)보건의료원 건물 안전진단 실시

❍ 2013. 09월 : 노인․장애인복지관 건립(구,의료원 리모델링)계획 수립

❍ 2013. 10월 : 군자체 지방재정 투․융자심사 승인(31억원)

❍ 2013. 11월 : 2013~2017년 중기지방재정계획 반영(31억원)

❍ 2014. 01월 : 2014년도 분권교부세 대상사업 확정

❍ 2014. 02월 : 구)보건의료원 건물 활용 부서의견 수렴

❍ 2014. 02월 : 노인․장애인복지관 건립(신축)계획 수립

❍ 2014. 03월 : 공유재산 관리계획 수립 및 승인

❍ 2014. 04월 : 2015년도 복권기금사업 신청 및 확정

❍ 2014. 02월~6월 : 관련단체 사업설명(3회), 주민공청회 개최(1회)

❍ 2014. 06월 : 복지관 건립 군정조정위원회 심의(신축)

❍ 2014. 05월~7월 : 타 지자체 복지관 견학(관련공무원 및 단체)

❍ 2014. 07월 : 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2014. 10월 : (설계용역업체 동반) 타 지자체 복지관 견학

❍ 2014. 10월 : 2015~2019년 중기지방재정계획 반영(46억원)

❍ 2014. 11월 : 구)보건의료원 철거 완료

❍ 2014. 11월 : 복지관 건립 관련단체 중간 설명회

❍ 2014. 12월 : 도 재정지원사업(도비 10억) 및 2015년 군비 확정

❍ 2014. 12월 : 지방재정 투자심사(재심사) 의뢰(도 재심사 : 사업비 증가)

❍ 2015. 01월 : 문화재영향검토 협의 완료

❍ 2015. 02월 : 복지관신축 기본 및 실시설계 용역 준공 /건축협의 완료

❍ 2015. 02월 : 복지관 신축공사 시행 및 계약심사 의뢰

❍ 2015. 03월 : 지방재정 투자사업 도(재심사) 승인

❍ 2015. 02.~03월 : 계약심사 완료 및 입찰 공고

❍ 2015. 04. ~ : 공사 착공 (※준공기한 : 2016.01.03)

- 설계서 검토 ․ 공사 준비 등

- 착수회의(4/23, 감독관 및 공사관계자), 공사현장 여건 파악 등

- 부지경계측량(4/30), 가설울타리 설치 등

- 지내력 테스트 및 기초(파일)설계 (5.8~5.11)

❍ 2015. 06.~07.16: 주차장바닥 등 철거공사 및 폐기물 처리용역(1회 변경)

❍ 2015. 07월 : 지반약화로 인한 기초파일시공 실정보고, 설계변경

❍ 2015. 07.20월 : 경남도 설계변경 심사 승인(251백만원 증액)

❍ 2015.08.01~09.14 : 기초파일공사

❍ 2015.09.15~10.04 : PIT층 공사

❍ 2015.10.12 : 공사기간 연기(2016.1.3 ⟶ 2016.6.9)

❍ 2015.10.05~12.08현재 : 3층 바닥까지 콘크리트 타설 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 동절기 공사 중지에 따른 준공기간 연기 불가피

→ 동절기 공사해제 이후 본격적인 시공을 통해 조속 준공

□ 향후 추진계획

❍ 복지관설치 및 운영 조례 제정              : ‘16. 03

❍ 운영계획 결정(위탁운영시 군 의회 동의)     : ‘16. 04

❍ 수탁기관 선정 및 집기구입                 : ‘16. 06 ~ 07

❍ 개관                                      : ‘16. 08월경

구 분	시책사업
담당부서	주민생활지원실(노인복지담당)
추진진도(%)	30%

4

산청군 공설묘지 공원화사업 추진

❖ 장묘문화 인식개선으로 화장률 및 화장수요가 지속적으로 증가

❖ 봉안당 증축에 따른 친환경주차장 부족현상 대비 및 장사시설에 대한 이미지 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 신등가회로 357-17 일원

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ～ 2016. 12

❍ 사업내용

- 산청군계획시설(봉안시설) 기본계획 변경 용역(농지보전부담)

- 배수시설 및 순환도로 개설

- 친환경 주차장설치(잔디 및 조경수 식재) 등

❍ 예 산 액 : 240백만원

□ 추진사항

❍ ‘13~14년 : 토지매입 (10필지 13,215㎡)

❍ ‘14.05.08 : 제2본향원 신축(지상 2층 470㎡ /철근콘크리트 구조)

❍ ‘14.09.23 : 제1본향원 리모델링 : 출입문 정비, 지하층 내․외 전면정비 등

❍ ‘15.02.02 : 제2본향원 앞 주차장포장 및 차폐 조경공사(수목이식)

□ 문제점 및 대책

❍ 산청군관리계획(용도지역 봉안시설) 변경 이후 사업추진 가능

→ 매입토지는 군관리계획 변경 이전 농지로 유지함에 따라 유상허가

□ 향후 추진계획

❍ 산청군관리계획(용도지역 봉안시설) 변경 : 2016. 6월(경제도시과)

❍ 군 관리계획 시설(봉안시설)실시계획인가 : 2016. 8월

❍ 친환경주차장설치, 배수시설 및 순환도로 개설 : 2016. 8월 이후