안전행정과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2015년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(안전행정과)

□ 총    평

❍ 거점학교 설립을 위한 경남도 교육청 자체재정투자 심의 및 교육부 중앙재정투자 심사 확정으로 “교육산청” 기반구축

❍ 소방수요에 능동적인 대처로 군민의 인명 및 재산피해 최소화

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	3	1	2
군 수 공 약 사 업	1		1
주요시책사업	2	1	1

□ 주요성과

❍ 경남도 교육청 자체재정투자 심의 및 교육부 중앙재정투자 심의 확정        - 중학교 : 256억원(특교 310억원), 고등학교 : 293억원(특교 300억원)

❍ 소방기반시설 구축으로 군민안전제고 및 질 높은 소방서비스 제공

□ 향후 추진계획

❍ 산청지역 적정규모학교 설립의 지속적인 추진으로 “교육산청” 실현

❍ 산청소방서 건축공사 및 통신시설 등 신설공사 : 2015년 9월 ~ 2016년 12월     ❍ 산청소방서 신청사 이전 및 업무 개시 : 2017. 1월

구 분	공약사업
담당부서	안전행정과(교육지원담당)
추진진도(%)	70%

5

기숙형 우수 고등학교 육성 지원

산청군 지역에 적정규모학교설립을 통해 열악한 교육환경 개선

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 일원 (현, 산청고, 산청중 부지)

❍ 사업대상 : 기숙형 중․고등학교 설립(중학교1, 고등학교1)

❍ 사업기간 : 2018년 3월 개교(2015년 ~ 2017년)

□ 추진사항

❍‘14. 11. 13. : 산청지역 적정규모학교설립 추진단 발족

❍‘15. 02. 26. : 도교육청 적정규모학교설립 추진계획 협의

❍‘15.3.9.~3.13. : 적정규모학교 설립 설명회 및 토론회 개최

❍‘15.3.19.~3.30. : 학부모 찬반의견서 발송 및 회수

❍‘15. 3. 31. : 학부모 찬반의견조사 개표 : 거점1지역 가결

❍‘15. 4. 29. : 학교부지 선정위원회 구성

❍‘15.4.29.~ 6.17. : 학교부지 선정위원회 운영 및 선정

- 제1안 산청중․고등 부지에 중․고등학교 설립

❍‘15. 8. 10. : 경남도교육청 자체재정투자 심의 확정

❍‘15. 9. 24. : 교육부 중앙재정투자 심사 확정

- 중학교 : 256억원(특교 310억원), 고등학교 : 293억원(특교 300억원)

□ 문제점 및 대책(애로사항)

❍ 중학교 추가편입부지에 대한 농림지역 해제 등 행정절차 필요,

공사기간 부족으로 2018년도 개교에 장애요인

☞ 중․고등학교 동시 개교 불가 시, 연차적 개교 유도

□ 향후 추진계획

❍ ‘16. 8월중 :농림지역 해제(중학교 편입부지 매입) 등 행정절차 이행    ❍ ‘18. 2월 : 설계용역 및 건축공사 준공

구 분	시책사업
담당부서	안전행정과(안전관리담당)
추진진도(%)	40%

6

산청소방서 이전 신축

급증하는 소방수요에 능동적 대처와 산청군민의 생명과 재산보호에 만전을 기하고, 질 높은 소방서비스 제공과 소방청사 근무환경개선으로 근무의욕을고취 하고자 함

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2012년 ~ 2016년

❍ 위    치 : 산청읍 지리 836번지 등(14필지)/7,887.8㎡

❍ 사 업 비 : 5,579백만원(도비100%)

❍ 사업내용 : 2,994.79㎡(3층 1동, 1층 1동)

❍ 부지용도 : 제1종 일반주거지역/소유자 : 산청군

□ 추진사항

❍ 산청군계획위원회 자문․심의(가결)       ⇒ 2014.  5.  1

❍ 군관리계획 결정(변경) 신청(군→도)     ⇒ 2014.  5. 13

❍ 경남도 도시계획위원회 심의   ⇒ 2014. 8. 22

❍ 기본 및 실시설계 입찰 공고   ⇒ 2014. 9월 ~ 10월(2월간)

❍ 기본 및 실시설계         ⇒ 2014. 11월 ~ 2015. 6월(7월간)

❍ 신축예산 확보(계속사업비) ⇒ 2015년도 당초예산 1,500백만원

❍ 일상감사 및 계약심사    ⇒ 2015. 6월 ~ 7월(2월)

❍ 공사입찰 공고           ⇒ 2015. 7월 ~ 8월(2월)

❍ 공사착공                ⇒ 2015. 9월 4일

□ 문제점 및 대책

❍ 없음

□ 향후 추진계획

❍ 건축공사        ⇒ 2015. 9월 ~ 2016. 9월(1년)

❍ 통신시설 등 신설 및 이전 공사 ⇒ 2016. 9월 ~ 2016. 12월

❍ 신청사 이전 및 업무개시 ⇒ 2017. 1월

구 분	시책사업
담당부서	안전행정과(안전관리담당)
추진진도(%)	100%

7

화재예방 마을공동 소화기 보급사업

❖ 마을 공동 소화기 보급으로 신속한 초기대응 체계 구축

❖ 대형 화재로의 확산을 막아 인명 및 재산피해 최소화 도모

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 산청군 관내 전 경로당 359개소(등록․미등록)

❍ 사업기간 : 2015. 3월 ~ 4월

❍ 사업내용 : 경로당별 분말소화기(3.3㎏) 3개 보급(총 1,077개)

❍ 사 업 비 : 27백만원

□ 추진사항

❍ 소화기구입                   ⇒ 2015. 1. 8

- 경로당 359소 × 3개 = 1,077개

❍ 소화기 배부(군→읍면사무소)   ⇒ 2015. 1. 20

❍ 마을경로당 소화기 비치완료   ⇒ 2015. 1. 26

❍ 분말소화기 사용교육실시      ⇒ 2015. 2. 1 ~ 2. 28(소방서)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 유효사용기간 3년 이후 구입교체