문화관광과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2015년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(문화관광과)

□ 총    평

❍ 지역축제의 성공적 개최를 위해 대내외 관광객을 위한 차별있고

특색있는 음악회 개최 및 다양한 문화예술 행사를 제공하였고,

각종 동호회 및 단체에 문화예술 활동 지원과 문화 취약계층을 위한       찾아가는 예술 활동 추진으로 예술로 소통하는 문화행정을 추진하였음

❍ 해마다 늘어나고 있는 관광수요에 대응하기 위해 전통한방휴양관광지ㆍ        중산관광지 산악관광센터ㆍ한국선비문화연구원ㆍ남사전통한옥체험마을 등       사업 마무리 및 효율적 관리

❍ 각종 이미지 광고, 언론홍보, 관광홍보물 배부, 팸투어, 박람회 참가,       인센티브제 운영 등 적극적인 관광마케팅 실시를 통해 국내외 관광객       유치 및 관광산청 이미지 제고

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	11		11
군 수 공 약 사 업	8		8
주요시책사업	3		3

□ 주요성과

❍ 품격 있는 문화향유 기회 확대 및 군민화합도모 (문화예술담당)

- 한마음 음악회 개최(2015. 08. 28)

: 쎄시봉과 함께하는 음악공연

- 제39회 남명선비문화축제 개최(2015. 10. 10 ~ 10. 11)

: 남명제례, 남명과 곽재우 뮤지컬 공연 및 문화행사등

- 제42회 지리산평화제 개최(2015. 10. 11)

: 산신제례, 위령제등

- 경남도민예술단 및 우수예술단체 찾아가는 문화활동 공연

- 문화예술회관 무료 영화상영 : 12회 1,640명

- 산청선비대학 운영 : 주1회 40여명

❍ 체계적인 전통문화유산 계승과 문화재 보존 (문화재담당)

- 국가지정문화재 보수사업 : 대원사 다층석탑 주변정비 외 8개 사업 / 1,523백만원

- 도지정문화재 보수사업 : 배산서원 주변정비사업 외 10개 사업 / 659백만원

- 전통사찰 보수 및 방재시스템 구축사업 : 3개 사업 / 494백만원

- 전통향교문화전승보존사업 : 4개 사업 / 29백만원

❍ 엘리트 및 생활체육 활성화를 통한 군민의 건강한 삶 유지와

활력 있는 지역분위기 조성 (체육담당)

- 체육대회 유치 : 제10회 경상남도어르신생활체육대회, 산청전국         장사씨름대회, 제1회 산청군수배 전국남여궁도대회, 전국오픈탁구대회

- 제1회 산청군수배 전국유소년 축구대회 성공 개최로 전지훈련팀

유치 활성화에 기여

- 공설운동장, 산청체육센터 등 체육시설 이용 : 1,120회, 12,900명

- 생초축구문화센터건립사업 완료 : 250백만원

- 시천생활체육시설조성사업 : 1,850백만원(진도 70%)

- 산청공설운동장관람석정비공사 완료 : 350백만원

- 남부생활체육공원 진입도로개설공사 완료 : 500백만원

- 생초제2축구장 주차장정비공사 완료 : 300백만원

- 산청 신안풋살구장설치사업 완료 : 250백만원

❍ 차별화된 홍보마케팅 추진으로 산청의 브랜드 가치 제고 (관광진흥담당)

- 해외 단체관광객 유치 : 중국, 태국 등 33회, 1,000여명 방문

- 관광산청 이미지 집중 홍보: 다중이용시설(2개소), 공항(1개소), 터미널         (4개소), 지하철(4개소), 버스랩핑(시외 30대, 관내 관광버스 15대)

- 관광마케팅 활성화 : 팸투어(6회, 140명), 단체여행객 유치 인센티브

(36회, 1,044명), 주요 박람회 및 홍보행사 참석(3회)

- 스마트폰 모바일 웹 활용 :□산청여행□애플리케이션, QR코드

- 관광안내 홍보물 제작 활용 : 관광홍보물(관광안내지도, 산행지도 등),           관광기념품(멀티스카프, 물티슈, 머그컵, 쿨토시 등)

- 문화관광해설사 활동 : 주요 관광명소 배치․활동(11명, 2,600여회)

❍ 관광기반시설 조성사업 등 (관광개발담당)

• 남사전통한옥체험마을조성 계속사업 추진(총 공정율 75%)

- 향토음식체험관 증축공사 완료

- 이벤트장조성사업 완료

- 노후한옥정비사업 추진(40%)

- 전력지중화사업 추진(공정율 98%)

- 이벤트장조성사업(Ⅱ) 실시설계용역 추진(공정율10%)

• 중산관광지 트익아트 체험공간 조성사업 추진(공정율 15%)

- 총사업비 1,500백만원

- 실시설계용역 완료

- 공사착공(1차분)

• 황매산 공원권 관광기반 조성 공약사업 추진(공정율 15%)

- 총사업비 1,200백만원

- 실시설계용역 완료

- 공사착공(1차분)

• 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업 추진(공정율 5%)

- 총사업비 5,000백만원

- 기본계획 및 타당성연구 용역 추진(공정율70%)

□ 반    성

❍ 산청 시천생활체육시설조성사업의 토지보상 지연으로 계획년도 내       사업 미완료로 인한 주민생활편익 제공 지연됨.

❍ 남사전통한옥체험마을조성사업 중 전력지중화사업이 지연되어 기타

단위사업 추진에 지장을 초래하고 있어 조속한 시일 내 전력지중화사업       마무리하여 연계사업 원활 추진

□ 향후 추진계획

❍ ‘16.01 : 중산관광지 트릭아트 체험공간 조성사업(2차분) 착공

❍ ‘16.01 : 황매산 공원권 관광기반 조성사업(2차분) 착공

❍ ‘16.03 : 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업 설계용역 착공

❍ ‘16.04 : 남사전통한옥체험마을조성 이벤트장 조성사업(Ⅱ) 착공

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	연중

10

경남산청FC 운영비 지원

지역 내 축구 관련 시설 및 인적 자원 등을 연계·활용하여 축구에 재능 있는 청소년들의 축구활동을 지원하고, 축구영재를 발굴·육성하여 지역축구발전에 기여코자 함

□ 사업 개요

❍ 사 업 명 : 경남산청FC U-15 지원사업

❍ 사 업 비 : 40백만원(군30, 자부담10)

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

❍ 사 업 량 : 40명정도(중1 ~ 중3)

❍ 사업내용 : 각종 대회참가 및 훈련에 따른 소모품 구입 지원

□ 추진사항

❍ 2015. 1월 : 2015년도 경남산청FC 보조금 교부

❍ 2015. 1월 : 춘계대회 참가

❍ 2015. 3월 ~ 9월 : 주말리그 참가

❍ 2015. 7월 : 추계대회(MBC꿈나무리그 및 무학기대회)참가

❍ 2015. 11월 : 스페인레알마드리드 축구교실 참가

❍ 2015. 12월 : 제1회 산청군수배 전국유소년 축구대회 참가

□ 기대효과

❍ 각종대회 상위 입상으로 산청군 체육의 위상 제고

❍ 우수선수 육성으로 축구인재를 통한 지역민의 자긍심 고취

❍ 스토브리그 개최 등으로 동계 전지훈련 활성화에 기여

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(문화예술담당)
추진진도(%)	30%

11

산청문화원 운영 활성화

지역주민의 다양한 문화예술, 여가활동 및 소통 공간으로 활동되고 있는 문화원 시설 신축과 분과위원회 및 문화학교 운영 내실화 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 일원

❍ 기    간 : 2015 ~ 2017

❍ 사 업 비 : 1,989백만원

❍ 사 업 량 : 산청문화원 신축사업

문화원분과위원회 및 문화학교 운영 내실화

□ 추진사항

❍ ‘15. 7월 ~ 12월 : 산청문화원분과(27개분과) 및 문화학교(10개반) 운영

❍ ‘15. 12월 : 산청문화원 신축에 따른 기본 및 실시설계용역 발주

□ 문제점 및 대책

❍ 산청문화원 신축 예산은 확보 하였으나 연차(2년간)별

→ 건축 부문별 공정 고려로 내실 있게 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 문화원 분과위원회 및 문화학교 운영 내실화 지속 추진

❍ 산청문화원 신축사업 시행

- 기본 및 실시설계 용역 완료 : 2016. 4월

- 착공 : 2016. 9월

- 완공 : 2017. 6월

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	15%

12

황매산 공원권 관광기반 조성사업

등산객 및 관광객이 황매산을 방문 시 휴식을 취할 수 있는 공간 부족으로 생태형공원을 조성하여 캠핑 및 등산 후 힐링을 할 수 있는 장소 제공

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 황매산 공원권 관광기반 조성사업

(천년사랑 테마형 관광기반 조성사업)

❍ 위    치 : 차황면 법평리 일원

❍ 기    간 : 2015 ~ 2016

❍ 사 업 량 : 주차장 A=6,870㎡, 쉼터조성 A=7,700㎡

❍ 사 업 비 : 1,200백만원(국비600 / 도비180 / 군비420)

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	‘15년	‘16년	‘17년	비고
계	1,200	-	200	1,000	-
국 비	600	-	100	500	-
도 비	180	-	30	150	-
군 비	420	-	70	350	-

□ 추진사항

❍‘14. 10 : 15년 신규사업 국,도비 확정 통보(경남도⇒산청군)

❍‘15. 02 : 실시설계용역 착수

❍‘15. 12 : 사업착공(1차분)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘16. 01 : 사업착공(2차분)

❍ ‘16. 06 : 사업준공

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	10%

13

호암지구 게이트볼장 건립

단성면 입석리 호암지구 내 게이트볼장이 현재 사유지에 위치하여 토지소유자의 건축계획으로 존폐위기에 처해 있어 인근 군유지를 활용한 게이트볼장 건립으로 노인들의 여가선용 및 건강증진 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 호암전천후게이트볼장 건립사업

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2016

❍ 위    치 : 단성면 입석리 840-1번지

❍ 사 업 비 : 420백만원 (시설비 : 400, 설계비 : 20)

❍ 사 업 량 : 호암전천후게이트볼장 건립 A=600㎡

□ 추진사항

❍ 2014.11월 : 공유재산 관리이관 협의 요청

❍ 2014.10월 : 공유재산 군정조정위원회 가결

❍ 2015.02월 : 야외 게이트볼장 조성 완료

❍ 2015.04월 : 2016년 게이트볼장 건립 지특예산 신청

❍ 2015.11월 : 2016년 지특 예산 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2016. 1월 ~ 3월 : 기본계획 및 실시설계 용역 시행

❍ 2016. 4월 ~ 7월 : 사업 착수 및 준공

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	95%

14

서부지구 친환경 캠핑장 조성

자연경관이 우수한 창촌리 일원의 폐천부지 활용을 친환경 캠핑장으로 조성하여 생태적․경관적 잠재성을 도출하여 지역주민소득창출 및 관광객의 여가선용 기회 제공

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 산청따라하동길 조성사업

❍ 위    치 : 단성면 창촌리 834-25번지 일원

❍ 사 업 비 : 2,270백만원 (국 1,917, 군 299)

❍ 사 업 량 : 다목적 캠핑장 조성 A=70,000㎡

❍ 사업기간 : 2013. 4. ~ 2016. 6.

□ 추진사항

❍ 2014.06월 : 1구역 부지기반조성 및 경관조성사업 완료

❍ 2014.12월 : 2구역 캠핑장부 시설공사 착수

❍ 2015.11월 : 캠핑장부 기반시설 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 해당 지역이 농업진흥지역으로 관리되고 있어 캠핑장 등록에 어려움에 있고 2015년 군관리계획 재정비시 농업진흥구역 해제 후 야영장 운영

□ 향후 추진계획

❍ 2016.1월 ~ 6월 : 샤워실, 화장실 증설

❍ 2016.1월 ~ : 우리군 전국단위 축제와 연계 프로그램 개발

❍ 2016.6월 : 캠핑장 운영

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	5%

15ㆍ/

생활체육시설 확충(수영장]

다양한 생활체육시설 확충으로 군민의 건전한 여가생활과 건강증진을 도모하고 지역한 균형적인 체육 인프라 구축에 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 신안소재지권 수영장 확충

❍ 사 업 비 : 50억원정도

❍ 사업내역 : 시설 건립 1식(25m, 4레인)

❍ 사업기간 : 착수일로부터 2년간

□ 추진사항

❍ 2014.11월 : 국비 사업 건의 방문

❍ 2015.12월 : 투융자 심의 신청(경상남도)

❍ 2015.12월 : 기본계획용역 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 문제점 : 2017년 국도비 재원 확보 후 공사 시행

❍ 대  책 : 행정절차 이행 후 2017년 지특 사업 신청

□ 향후 추진계획

❍ 2016.1월 ~ 3월 : 기본계획 및 타당성 용역 시행

❍ 2016.4월 : 17년도 지특사업 신청

❍ 2016.11월 : 실시설계 용역 시행

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	10%

16

그라운드골프장 관리실 신축

산청읍 옥산리 718번지 내 그라운드골프장 경기장 내 관리실(편의시설) 신축 및 시설재정비로 노인체육 활성화 및 건강증진 기여

□ 사업개요

❍ 사업명 : 산청 그라운드골프장 관리실 신축

❍ 위 치 : 산청읍 옥산리 718번지

❍ 사업비 : 200백만원

❍ 사업량 : 관리실 신축 A=150㎡

□ 추진사항

❍ 2015.04월 : 2016년 게이트볼장 건립 지특예산 신청

❍ 2015.11월 : 2016년 지특예산 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 2016년 지특 (도자율편성) 예산 확보로 정상추진

□ 향후 추진계획

❍ 2016. 1월 ~ 3월 : 기본계획 및 실시설계 용역 시행

❍ 2016. 4월 ~ 7월 : 사업 착수 및 준공

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	연중

17

스포츠마케팅 활동 강화

체육시설 인프라 구축 및 스포츠마케팅을 활성화를 통해 전국 및 도 단위 대회와 전지 훈련팀을 적극 유치하여 체육저변 확대 및 지역경제 활성화에 기여코자 함

□ 유치 개요

❍ 동계유치기간 : 2015.12 ~ 2016.02

❍ 유치팀수 및 종목 : 50팀 내외(축구,테니스,야구,씨름,탁구 등)

❍ 전지훈련비 지원 : 30백만원

❍ 산청군수배 전국 유소년 축구대회 개최 : 60백만원

❍ 장 소 : 공설운동장 및 생초축구장 등

□ 추진사항

❍ 2015.12월 : 전지훈련 유치위원회 개최 및 지원계획 수립

❍ 2015.12월 : 제1회 산청군수배 전국유소년축구대회 개최

- 25개팀 700명(선수, 감독, 임원 및 학부모) 참석

❍ 2016. 1월 : 산청군출신 체육선수, 감독 등 인적 네트워크 활용

적극 홍보 및 유치

□ 향후 추진계획

❍ 2016.1월 ~ 2월 : 산청군 방문 전지훈련팀 지원

❍ 2016.8월 ~ : 동계 전지훈련팀 유치를 위한 산청출신 감독면담

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	75%

18

시천생활체육시설 조성사업

❖ 선비문화연구원 조성 부지 내 테니스장, 게이트볼장 대체

❖ 생활체육 저변확대 및 균형적인 체육시설 조성을 통한 생활체육       발전 도모

□ 사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 천평리 567-1번지 일원

❍ 사업기간  : 2014. 1월 ~ 2015년 12월

❍ 사 업 량  : 생활체육시설조성 23,857㎡

❍ 총사업비  : 5,000백만원(국비1,300  도비585  군비3,115)

❍ 사업내용  : 인조잔디축구장, 테니스장, 다목적구장, 게이트볼장

□ 세부추진계획

❍ ‘09. 10 : 지방중기재정계획 반영

❍ ‘10. 10 : 타당성 조사 및 기본계획수립

❍ ‘10. 11 : 지방재정투융자심사완료

❍ ‘10. 11 : 공유재산관리계획 승인

❍ ‘13. 12 : 군관리계획(체육시설) 변경 결정 완료

❍ ‘13. 12 : 실시설계 용역 시행

❍ ‘11. 01월 ~ ’14. 12월 : 토지보상(100% 완료)

❍ ‘14. 06월 ~ ’16. 03월 : 사업착수 및 준공(현 공정 70%)

□ 문제점 및 대책

❍ 토지보상이 지연되어 공정률이 저조하였으나 현재 보상 완료로 정상     추진 중

□ 향후 추진계획

❍ 2016. 3월 : 사업 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	15%

19

중산관광지 트릭아트 체험공간 조성사업

해마다 많은 등산객 및 피서객이 방문하는 관광지에 관광객들이 눈으로 보고 즐기며 체험할 수 있는 시설이 전무한 상태로 착시현상을 통한 트릭아트 체험관을 조성하여 남녀노소 누구나 신기한 체험을 할 수 있는 공간을 조성·제공하여 보다 더 많은 관광객 유치에 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 중산관광지 트릭아트 체험공간 조성사업

❍ 기    간 : 2015 ~ 2016

❍ 사 업 량 : 트릭아트체험관(건축면적 702㎡), 야외조형물 설치 1식

❍ 위    치 : 시천면 중산리 일원

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(국비750 / 도비225 / 군비525)

(단위:백만원)

구 분	총사업비	기투자	‘15년	‘16년	‘17년	비고
계	1,500	-	200	1,300	-
국 비	750	-	100	650	-
도 비	225	-	30	195	-
군 비	525	-	70	455	-

□ 추진사항

❍‘14. 10 : 15년 신규사업 국,도비 확정 통보(경남도⇒산청군)

❍‘15. 06 : 실시설계용역 착수

❍‘15. 12 : 사업착공(1차분)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘16. 01 : 사업착공(2차분)

❍ ‘16. 12 : 사업준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	75%

20

남사 전통한옥체험마을 조성

전통한옥마을로서 가치를 지니고 있고 지역주민의 관광개발 의지가 높은 남사마을을 복합형 전통한옥문화촌으로 정비하여 역사와 전통, 문화가 조화된 테마형 농촌체험공간을 조성하기 위함

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 남사전통한옥체험마을조성

❍ 위    치 : 단성면 지리산대로 2897번길(남사예담촌)

❍ 사 업 비 : 9,704백만원(국비 4,794 / 도비 1,438 / 군비 3,472)

❍ 사 업 량

- 물레방앗간 산죽지붕잇기(196㎡)

- 향토음식체험관 건립(지상1층 목조건물 A=158㎡)

- 야외이벤트장 A=856㎡(옛담장 L=50m, 상설무대 및 휴게시설)

- 마을안길포장(A=4,084㎡), 노후한옥정비(6,930㎡), 산책로 조성(1.5km)

- 전력간선 지중화사업 1식(1.5㎞), 종합관광안내소(1동/99㎡)

□ 추진사항

❍ ‘06.12 : 지리산권 광역관광개발계획 특화사업 확정

❍ ‘07.10 : 지방재정투융자사업 심사 승인

❍ ‘08.12 : 중기지방재정계획 반영

❍ ‘11.09 : 향토음식체험관 건립공사 준공

❍ ‘14.03 : 전력간선지중화사업 시행

❍ ‘14.03 : 사업계획 변경 승인(문화체육관광부)

❍ ‘14.05 : 종합관광안내소 준공

❍ ‘14.10 : 마을안길정비공사 준공

❍ ‘14.10 : 이벤트장 조성사업 착공

❍ ‘15.01 : 노후한옥정비사업 시행

❍ ‘15.07 : 향토음식체험관 증축공사 완료

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 01 ~ ’16. 12 : 노후한옥정비사업 시행

❍ ‘16. 01 : 산책로 조성사업 착공