산림녹지과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2015년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(  산림녹지과 )

□ 총    평

❍ 사업별 계획에 따라 시기 적절히 추진되었으며, 산림을 통한 군민의 복지, 휴양, 소득 증대 및 산림의 가치를 증대시켰음.

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4	1	3
군 수 공 약 사 업	1		1
주요시책사업	3	1	2

□ 주요성과

❍ 치유의 숲 기본계획 용역사업 완료

❍ 숲가꾸기 사업의 경우 당초 계획한 1000ha에서 200ha 초과달성

❍ 경제수 조림으로 농가 소득 증대 기여

□ 반    성

❍ 조림사업 및 숲가꾸기 사업의 경우 산주 동의서를 받는데 어려       움이 있어 사업이 계획보다 지연

❍ 곶감명품화사업의 경우 민간보조사업으로 사업대상자 변경되어       지연으로 인한 균형집행 미흡

□ 향후 추진계획

❍ 2016년 치유의 숲 실시설계 용역 시행

❍ 조림 및 숲가꾸기 사업지에 대한 산주 교육, 홍보로 식재된        묘목의 사후 관리 및 산림 보호 증진

구 분	공약사업
담당부서	산림녹지괴(공원녹지담당)
추진진도(%)	57%

21

산림자원 구조변경(리모델링) 사업

경제적 가치가 낮은 불량목 및 노령목 임지의 수종 갱신으로 산림자원을 구조변경(경제적 가치가 높은 장․단기성 경제수종으로 갱신)하여 산림소득 창출 및 주민소득증대에 기여

□ 사업개요

❍ 사업대상 : 노령․불량임지 250ha

❍ 사업내역 : 불량임지 120ha, 밤나무 노령목 임지 100ha,

불량소나무 재해피해임지 30ha

❍ 소요예산 : 1,000백만원(국비762, 도비63, 군비175)

□ 추진사항

❍ 15년 춘기 경제수조림사업 : 33ha(63백만원)

❍ 15년 춘기 특용수조림사업 : 57ha(183백만원)

❍ 15년 춘기 재해방지조림사업 : 28ha(74백만원)

❍ 15년 추기 특용수조림사업: 10ha(51백만원)

❍ 15년 추기 경제수조림사업 : 8ha(29백만원)

❍ 15년 특용수(호두나무) 조림 : 8.5ha(38백만원)

계: 144.5ha(438백만원)

※ 주요식재 수종 : 편백, 백합나무, 상수리나무, 음나무, 헛개나무,

들메나무, 호두나무 등.

□ 문제점 및 대책

❍ 불량임지 리모델링에 대한 산주들의 인식 부족으로 사업 기피

❍ 산림사업의 특성상 비용회수가 장기간으로 산주의 사업 회피

❍ 불량임지에 수종갱신으로 소득창출에 대한 지속적 홍보 실시

□ 향후 추진계획

❍ 불량임지의 구조변경으로 산지 자원화에 기여하며, 산림자원의

리모델링을 통한 새로운 소득원 창출을 위한 식재수종 개발

구 분	시책사업
담당부서	산림녹지과(산지관리담당)
추진진도(%)	100%

22

숲 가꾸기 사업

지속 가능한 숲 가꾸기를 통하여 산림의 생태․환경적인 건전성을 유지, 산림의 다양한 기능이 발휘되도록 관리

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 숲 가꾸기 사업

❍ 사 업 량 : 1,200ha(※당초계획 1,000ha)

❍ 사 업 비 : 1,846백만원

❍ 대 상 지 : 전 읍․면

❍ 사업기간 : 2015년 1~12월

□ 추진사항

❍ 2015. 1월    : 15년 대상지 확정(공고 및 산주동의)

❍ 2015. 2~3월 : 사업별 실시설계 및 사업 시행

❍ 2015. 6월    : 상반기 숲 가꾸기 사업 완료(600ha)

❍ 2015. 9월    : 하반기 실시설계 및 사업 시행

❍ 2015. 12월   : 하반기 숲 가꾸기 사업 완료(600ha)

□ 문제점 및 대책

❍ 타 지역에 거주하는 산주의 경우 사업 이해도가 낮아 동의서 징구 애로

❍ 산림사업의 지속적 홍보로 주민 산주 인식 제고

□ 향후 추진방향

❍ 숲 가꾸기 사업 홍보물 제작 및 전 읍·면을 통한 홍보

❍ 주요 관광지, 도로변 등에 목재생산림, 생활환경 보전림      조성으로 볼거리 제공

구 분	시책사업
담당부서	산림녹지과(산촌소득담당)
추진진도(%)	81%

23

지리산 산청곶감 명품화 사업

산청곶감 명품화를 통한 국내·외 시장 경쟁력 제고 및 농가소득 안정화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 송하중태길 6(산청곶감 유통센터일원)

❍ 사업기간 : 2014∼2015년

❍ 사업주관 : 지리산 산청곶감 작목연합회, 산청군농업협동조합

❍ 사 업 량 : 10개 분야(공동감 박피장 건립, 청정건조시설 건립, 유통센터 시설보강, 홍보 및 시장개척 등)

❍ 사 업 비 : 3,400백만원(국 1,700, 도 204, 군 476, 기타 1,020)

□ 추진실적

❍ 공동 감 박피장 건립(1개소)완료 : 487백만원

- 공동 감박피장(247㎡), 휴게실(29㎡), 저장시설(52㎡) 등

❍ 곶감유통센터 시설보강 완료 : 931백만원

- 공동 선별장,(656㎡), 저장시설(179㎡) : 800백만원

- 홍보관 및 간판 시설보강 : 131백만원

❍ 선도농가 시설지원(1개소)완료 : 231백만원

❍ 청정건조시설 보급(6개소) : 800백만원

❍ 곶감재배생산 기술교육 완료 : 20백만원

❍ 곶감연구개발 용역 완료 : 2건(푸딩, 만주), 47백만원

❍ 명품브랜드(디자인) 개발 2종 : 21백만원

❍ 홍보 및 시장개척 : 곶감포장재 제작 5종, 120백만원

❍ 공동장비구입 등 : 311백만원

□ 향후 추진계획

❍ 사업(이월) 추진 및 준공 : 2016년 5월

❍ 준공시설 활용(원료감 수매, 박피, 고감건조 등) : 2016년 11월 ~

구 분	시책사업
담당부서	산림녹지과(녹색담당)
추진진도(%)	5%

24

치유의 숲 조성

우리군 역점시책사업의 일환으로 추진하는 힐링산업(동의보감촌)과 연계하여 산림치유 인프라를 구축하여 대국민 휴양서비스 제공

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 산79-2번지외 2필

❍ 면    적 : 56ha

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년

❍ 사 업 비 : 50억원

□ 추진사항

❍ 2015. 02월 : 기본계획 및 타당성 조사 용역

❍ 2015. 03월 : 산림청 예산심의

❍ 2015. 05월 : 중간 보고회 개최

❍ 2015. 06월 : 현장 토론회 개최

❍ 2015. 07월 : 치유의 숲 기본계획 최종보고회

❍ 2015. 08월 : 치유의 숲 기본계획 용역완료

□ 향후 추진계획

❍ 2016.01월 : 치유의 숲 실시설계 용역

❍ 2016.09월 : 치유의 숲 조성계획 승인신청(산청군⇒경남도)

❍ 2016.10월 : 실시설계 및 각종 인허가 협의

❍ 2017.01월 : 1차년도 사업시행 및 준공

❍ 2018.02월 : 2차년도 사업시행 및 준공