항노화산업과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2015년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(항노화산업과)

□ 총    평

❍ 한방항노화산업의 육성을 위한 포럼 창립과 조례 제정, 항노화산업 육성 법제화를 위한 국회 토론회 개최 등 항노화산업의 체계적인 육성 기반 마련 및 대외 인지도 제고

❍ 산청한방약초축제의 2년 연속 문화체육관광부 지정 최우수축제 선정으로 항노화산업과 힐링관광의 메카로서의 대외 인지도 제고

❍ 한방약초밸리지구 기반조성 마무리와 분양촉진을 위한 특구계획 변경 추진으로 한방항노화 특화사업의 활성화 촉진

❍ 하수오 외 33종, 오미자 특화단지조성, 안정적인 육묘 공급 등 한방약초 안정생산 지원사업으로 고품질 명품약초 생산

❍ 항노화 힐링 아카데미 모델 개발 및 시범운영, 경상남도 인재개발원 교육과정 편성으로 동의보감촌 및 항노화산업을 연계한 힐링서비스 거점 기반 마련

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4	1	3
군 수 공 약 사 업	1		1
주요시책사업	3	1	2

□ 주요성과

❍ 산청한방항노화포럼 창립대회 및 토론회 개최

❍ 항노화산업 육성 법제화를 위한 대국민홍보 및 토론회 개최

❍ 항노화산업 육성 및 지원에 관한 조례 제정

❍ 산청한방약초축제의 2년 연속 문화체육관광부 최우수축제 선정

❍ 한방약초밸리지구 기반조성 완료 및 특구계획 변경 추진

❍ 산청약초시장 활성화 및 입점업체 자립화 지원

❍ 한방약초 안정생산 지원사업으로 고품질 명품약초 생산

- 고품질 명품약초 생산지원사업 확대

- 공정육묘장을 활용한 안정적인 육묘공급

❍ 항노화 힐링 프로그램 모델 개발 및 4회 시범 운영

❍ 힐링 아카데미 경남도 인재개발원 교육과정 신규 편성

❍ 한방항노화 제품개발 및 판로개척 지원

- 호주, 미국 등 해외마케팅 및 국내 박람회 참가 지원 등

□ 반    성

❍ 한방약초밸리지구의 특구계획 변경 승인, 확정측량, 환지계획 등 부지분양을 위한 사전조치 이행에 상당기간 소요

❍ 전략약초 육성 및 인력양성 등 장기적 발전과 경쟁력 확보

□ 향후 추진계획

❍ 한방항노화산업 육성 전략 구축 및 신규사업 발굴

❍ 제16회 산청한방약초축제 기본계획 수립 및 추진

❍ 산청한방약초산업특구 특화사업 활성화 집중 추진

❍ 선택과 집중을 통한 전략약초 육성으로 경쟁력 강화

❍ 힐링아카데미 운영을 통한 지역자원과 연계한 산업화 유도

❍ 향토산업(홍화, 베리류)육성을 통한 항노화 사업화 추진

구 분	공약사업
담당부서	항노화산업과(항노화담당)
추진진도(%)	30%

63

항노화산업 육성

❖ 지역특화자원을 활용한 항노화산업 집중 육성

❖ 경남미래 50년 전략사업과 연계한 한방항노화 융․복합 클러스터 구축

□ 사업개요

❍ 소요예산 : 76,420백만원(국비 4,500, 지방비 16,386, 민자 55,534)

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2020년

❍ 주요 사업내역

사 업 명		계(백만원)	국비	지방비	민자	비고
계		76,420	4,500	16,386	55,534
	산청한방약초타운 조성사업	55,600		9,600	46,000
	한방의료복지센터 구축	43,500		3,500	40,000
	한방약초밸리 조성	12,100		6,100	6,000
항노화 가공산업 육성		11,200	4,500	3,900	2,800
전략약초 생산기반 조성 및 육성		9,620		2,886	6,734

□ 추진사항

❍ 한방의료 복지센터 및 한방 약초밸리 기반조성 : 2011년 ~ 2016년

❍ 특화사업지구 분양촉진을 위한 특구계획 변경 : 2015. 4월 ~ 12월

❍ 향토산업(힐링, 홍화)육성사업 추진 : 2013년 ~ 2017년

❍ 한방약초 안정생산 지원사업 추진 : 2011년 ~ 2015년

❍ 한방항노화산업 육성 기반 구축 : 2015. 7월 ~ 2015. 12월

- 항노화포럼 창립, 항노화육성 조례 제정, 국회 입법토론회 개최

□ 향후 추진계획

❍ 한방요양병원, 흑돼지타운 부지매각 및 투자유치 : 2016. 1월 ~ 3월

❍ 향토산업(홍화, 베리류)육성 항노화 제품개발 : 2016년 ~ 2019년

❍ 동의보감촌 힐링아카데미 및 힐링 프로그램 상시운영 : 2016년 ~

❍ 전략약초 육성을 위한 약초특화단지 조성 : 2016년 ~

구 분	주요시책
담당부서	항노화산업과(항노화담당)
추진진도(%)	100%

64

제15회 산청한방약초축제 개최

❖ 전 세대를 아우르는 건강·힐링 콘텐츠 도입으로 대한민국 대표축제 육성

□ 다양한 수익사업 창출로 경제성을 갖춘 자립형 축제로 전환

□ 행사개요

❍ 기    간 : 2015. 5. 1.(금) ~ 5.10.(일), 10일간

❍ 장    소 : 산청IC 입구 축제광장 및 동의보감촌 일원

❍ 주요행사 : 12개 분야 120여개 단위행사

❍ 주최/주관 : 산청군 / 산청한방약초축제위원회

❍ 사 업 비 : 1,400백만원(국비250, 도비65, 군비1,085)

□ 추진사항

❍ 방문객수 : 830천명(축제광장 630, 동의보감촌 400)

❍ 판매실적 : 3,500백만원

- 약초 1,010, 농·특산물 790, 향토음식 600, 체험 등 기타 1,100

❍ 축제를 통한 지역경제 파급효과 : 160억원 정도

❍ 2016년 문화관광축제 심사평가 최우수축제 선정

- 관광진흥기금 250백만원, 도비 130백만원 지원

□ 문제점 및 대책

❍ 행사장 내 입점 음식시설의 메뉴, 서비스, 품질문제 개선

❍ 입점자 교육을 통한 상품 가격, 중량, 불친절 사례 개선

□ 향후 추진계획

❍ 대표축제 목표로 축제기반 구축 및 16회 축제실행계획 수립

❍ 지역환경과 인문환경 등 다양한 소재를 활용한 스토리텔링 접목

❍ 항노화 가공상품, 약선음식, 힐링서비스 등 특화된 콘텐츠 도입

❍ 지역주민 참여 확대 및 다양한 체험행사 개발

구 분	주요시책
담당부서	항노화산업과(항노화담당)
추진진도(%)	95%

65

한방약초밸리 조성사업

한방약초산업 지원센터, 한방의료복지센터, 경호강 등 한방항노화산업 및 관광 인프라와 연계한 체험과 체류형 힐링관광 거점으로 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 일원

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2016년

❍ 사 업 비 : 8,000백만원

❍ 사 업 량 : 90,950㎡

- 편입부지보상, 부지조성, 도로포장, 상하수도 및 전기공사, 옹벽설치 등

□ 추진사항

❍ 산청한방약초산업특구 확대지정(약초밸리지구 포함) : 2011. 4월

❍ 부지 보상협의 : 2010. 1월 ~ 2012. 12월

❍ 한방약초밸리 조성 실시설계 : 2011. 4월

❍ 기반조성 공사(도로, 가로등 등) : 2011. 5월 ~ 2015. 4월

❍ 산청한방약초산업특구 계획변경승인 : 2015. 4월

❍ 조성부지 확정측량 완료 : 2015. 11월

❍ 분양촉진을 위한 특구계획 변경 추진 : 2015. 10월 ~ 2016. 1월

□ 향후 추진계획

❍ 특구계획 변경 결정고시 및 실시계획 인가 추진 : 2016. 1월

❍ 조성부지 환지계획 용역 : 2016. 1월 ~ 2월

❍ 지적공부 정리 : 2016. 2월

❍ 감정평가 및 분양추진 : 2016. 3월 ~ 12월

구 분	주요시책
담당부서	항노화산업과(한방진흥담당)
추진진도(%)	70%

66

산청 홍화를 활용한 고부가가치사업

한의학의 본고장으로서의 역사성, 자생 약초자원, 한방 약초산업 인프라, 문화관광 자원 등을 활용하여 산청군 농촌 경제 활성화의 일한으로 홍화를 기반으로 한 고부가가치 산업화 실현

□ 사업개요

❍ 위     치 : 산청군 전역

❍ 사  업  량 : 전시판매장 구축 및 홍보․판촉행사 등 14개 세부사업

❍ 사  업  비 : 3,000백만원(국비1,500, 도비 180, 군비 695, 자부담 625)

- 2015년도 사업비 : 999백만원(국비500, 도비60, 군비196, 자부담243)

❍ 사업기간 : 2014년 ∼ 2017년(4년간)

❍ 참여업체 : 효성식품영농조합법인, ㈜홍화원, 안심가식품

□ 추진사항

❍ 홍화현미분말 가공공장 및 교육·전시체험시설 건립 : 2015. 8월

❍ 국내 홍화유통망 구축 : 2015. 4월　~ ８월

❍ 홍화 통합브랜드 캐릭터 개발 : 2015. 6월 ~ 8월

❍ 지역케이블방송 광고 등을 통한 홍보 : 2015. 4월 ~ 7월

❍ 상표등록 1건, 특허출원 2건, 특허등록 2건 : 2015. 10월 ~ 12월

❍ 공동포장재 디자인개발 : 2015. 10월 ~ 12월

❍ 공동POP 홍보물 제작 : 2015. 11월 ~ 12월

❍ 홍화연구개발 기술 및 시장동향분석 : 2015. 11월 ~ 12월

□ 향후 추진계획

❍ 제품개발 등 경상보조 12개 세부사업 : 2016. 1월 ~ 2017. 12월

(※ 2016년 군비(52백만원) 삭감분 1차 추경 확보 조치)

❍ 가공공장 설립 등 자본보조 1개 세부사업 : 2016. 1월 ~ 12월