상하수도사업소소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2015년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도사업소)

□ 총    평

❍ 노후된 소규모수도시설개량 및 지방상수도 확장을 통하여 지역간 불균형을 줄이고 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급으로 주민복지 증진 기여

❍ 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 추진상황

구 분	추 진 실 적					비고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	6	2	4	-	-
군수공약사업	5	2	3	-	-
주요시책사업	1	-	1	-	-

□ 주요성과

❍ 노후된 소규모수도시설개량, 지방상수도 인입 및 급수관로 누수        탐사 등을 통해 지방 및 마을 상수도의 깨끗하고 안정적인 수돗물       공급으로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

❍ 도리지구 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 반    성

❍ 산청˙생초 지방상수도 통합 및 확장공사 원도급사 파산에 따라       사업추진이 지연되었으나 연대보증시공회사 재착공에 따른 현장       정상화로 향후 계획대로 준공 될 수 있도록 사업추진에 만전을         기하겠음

□ 향후 추진계획

❍ 미확보 또는 부족분 재원 확보를 위해 도 또는 중앙부처와 지속       적인 협의로 예산이 확보 될 수 있도록 최선의 노력을 기하겠음

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(수도시설담당)
추진진도(%)	71%

81

산청-생초 지방상수도 통합 및 확장공사

한정된 수자원의 효율적 이용 및 지역간 수급 불균형을 해소하고 안정적인 정수수질 확보와 장래 수요량 변동에 따른 능동적 대처로 지역  주민들에게 깨끗한 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사업기간 : 2010년 12월 ~ 2016년 12월

❍ 사 업 비 : 29,717백만원(국비 16,824백만원, 군비 12,893백만원)

❍ 사 업 량 : 송․배수관로 L=24.7km, 취․정수시설 5,500톤/일, 건축 및 전기 등

❍ 시공업체 : 일산종합건설(주) 외

□ 추진사항

❍ ‘15. 03월 : 전면책임감리용역 2차분 준공 및 3차분 착공

❍ ‘15. 06월 : 본사업 3차분 준공 및 4차분 1회 기성

❍ ‘15. 09월 : 본사업 5차분 착공 및 4차분 2회 기성

❍ ‘15. 12월 : 본사업 4차분 준공 및 전기공사 1차분 1회 기성

❍ ‘15. 12월 : 전면책임감리용역 3차분 3회 기성

□ 문제점 및 대책

❍ 원도급사 파산에 따라 체불금 및 부진공정이 발생하였으나 연대       보증시공회사 재착공으로 체불금 일부 변제 및 부진공정 만회를        위한 복합공정 병행시공 등으로 정상추진 중에 있음

□ 향후 추진계획

❍ ‘16. 02월 : 본사업 6차분 착공(조경 등)

❍ ‘16. 05월 : 본사업 5차분 준공 및 전면책임감리용역 3차분 준공

❍ ‘16. 05월 : 전면책임감리용역 4차분 착공

❍ ‘16. 06월 : 정수장 시험가동 및 문제점 보완

❍ ‘16. 12월 : 전체준공 및 상수도 공급

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	10%

824

오전지구 공공하수처리시설 설치사업

농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 비 : 8,993백만원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 130톤/일, 하수관로 L=8,136m, 배수설비 332가구

□ 추진사항

❍ ‘14. 12. 11 : 실시설계용역 착수

❍ ‘15. 02. 26 : 산청군 하수도정비 기본계획(부분)변경 승인 요청

❍ ‘15. 04. 15 : 산청군 하수도정비 기본계획(부분)변경 승인 통보

❍ ‘15. 09. 15 : 하수처리시설 공법 심의 선정(SNR공법)

❍ ‘15. 12. 29 : 실시설계완료

□ 문제점 및 대책

❍ 2011년 기 수립된 오전하수처리구역이 5개마을(오전, 신기, 내평,

중촌, 왕촌)로 인근 3개마을(신촌, 오휴, 대현)이 제외되어 있음

❍ 하수처리구역을 확대․지정하고자 하수도정비 기본계획 부분 변경승인

으로 3개마을(신촌, 오휴, 대현)을 추가하여 용역 설계 완료

□ 향후 추진계획

❍ ‘16. 01월 ~ 2월 : 설치인가 및 재원협의

❍ ‘16. 03월 : 계약심사

❍ ‘16. 04월 : 사업 착공 예정

❍ ‘17. 12월 : 사업 준공 예정

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(수도시설담당)
추진진도(%)	20%

83

생비량지구 지방상수도 인입공사

생비량면의 수질악화 및 원수 부족 등의 근본적인 문제를 해결하기  위해 지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사업기간 : 2015년 12월 ~ 2018년 12월

❍ 사 업 비 : 15,304백만원(국비 10,713백만원, 군비 4,591백만원)

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 관로 77.1km, 가압장 4개소, 전기,제어 등

❍ 시공업체 : 영일개발㈜ 외

□ 추진사항

❍ ‘08. 10 : 산청군 수도정비 기본계획 반영

❍ ‘12. 02 : 18인 마을대표 지방상수도 조기 인입 건의

❍ ‘13. 06 : 추경 500백만원 확보 및 경상남도 투․융자 심사 완료

❍ ‘13. 10 : 기획재정부 승인 및 관련용역 PQ 기술심의 완료

❍ ‘13. 12 : 용역업자 선정 및 1차분 용역 발주

❍ ‘14. 04 : 2차분 용역 발주

❍ ‘15. 03 : 수도정비기본계획 부분변경(단성급수구역) 승인

❍ ‘15. 04 : 1차분 용역 준공[수도정비기본계획(변경)]

❍ ‘15. 05 : 실시설계용역 경제성검토(VE)용역 준공

❍ ‘15. 06 : 2차분 용역 준공(실시설계용역), 총사업비 변경 협의

❍ ‘15. 12 : 인허가 협의, 본사업(토목,기계분야) 도급업체 선정

□ 문제점 및 대책

❍ 본 사업을 통해 지선관로까지 사업 시행할 계획으로 총사업비 변경이

시급한 실정임(당초 8,180백만원 → 변경 15,304백만원, 증 7,124백만원)

❍ 사업의 당위성 등을 환경부에 설명하여 재원확보에 만전을 기함

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 12 : 동절기 공사중지 등

❍ ‘16. 04 :‘17년 예산 및 총사업비 변경 협의

❍ ‘16. 06 : 본사업 1차분 준공 및 2차분 발주

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	100%

846

도리마을 공공하수설치사업 확대

도리지구 공공하수처리시설 설치사업과 병행하여 도리지구 소재지와 인접한 원도동마을 하수처리구역까지 하수관거를 확대. 설치하여 하수도 보급율 증대와 지역발전균형에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 도리 일원

❍ 사 업 비 : 400백만원

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=1.2km, 배수설비 29가구

□ 추진사항

❍ ‘14. 03. 17 : 실시설계용역 착수

❍ ‘14. 05. 19 : 실시설계용역 완료

❍ ‘14. 06. 25 : 공사 착수

❍ ‘14. 10. 22 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(수도시설담당)
추진진도(%)	100%

85

사계마을 상수도 노후관 교체공사

신등면 양전리 사계마을의 기존 관로 노후화로 잦은 누수 및 파손으로 상수도 이용에 어려움이 있어 상수도 노후관 교체로 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 식수 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 양전리 사계마을

❍ 사업기간 : 2014년 12월 ~ 2015년 6월

❍ 사 업 비 : 65백만원(군비 65백만원)

❍ 사 업 량 : 관로교체 L=740m, 부대공 1식

□ 추진사항

❍ ‘14. 07월 : 노후관로 현장 조사

❍ ‘14. 10월 : 실시설계 용역 발주

❍ ‘14. 12월 : 사업발주 및 착공

❍ ‘15. 06월 : 사업준공

□ 문제점 및 대책

❍ 기존상수도 관로의 잦은 누수로 인해 단수 및 주민불편사항 가중

❍ 전구간 상수도 노후관 교체 및 감압밸브설치로 지역주민들의

안정적이고 깨끗한 식수 공급

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	시책사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	40%

868

시천·단계지구 하수관로 정비사업

산청군 시천면 및 신등면 중심소재지 하수처리구역으로서 하수관로미설치로 인한 하천 수질 환경이 악화되고 있어 하수관로 설치를 통한 생활오수를 적정 처리함으로써 양질의 수자원을 보전하고 농촌지역공중위행 향상 및 주거환경 개선에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 천평리 및 신등면 단계리 일원

❍ 사 업 비 : 9,296백만원(국비 6,507, 기금 1,673, 군비 1,116)

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=14.46km

❍ 사업기간 : 2014.9. ~ 2017.4.

□ 추진사항

❍ ‘14. 1월 : 실시설계용역 착수

❍ ‘14. 9월 : 실시설계용역 완료

❍ ‘14. 9월 : 1차공사(단계지구) 착공

❍ ‘14. 10월~12월 : 재원협의

❍ ‘15. 3월 : 계약심사

❍ ‘15. 4월 : 1차공사(시천지구) 착공

❍ ‘15. 6월 : 1차공사(단계지구) 준공

❍ ‘15. 12월 : 동절기 공사 중단, 시천지구 1차분 1회 기성

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ ‘16. 04월 : 1차공사(시천지구) 준공

❍ ‘16. 01월 : 2차공사(시천지구) 착공

❍ ‘16. 12월 : 2차공사 준공 및 총괄공사 준공