소규모 지역개발 주민숙원사업 추진

주민 생활과 밀접한 불편시설에 대하여 소규모 지역개발 주민숙원      사업을 시행하여 주민의 삶의 질 향상과 주민 편익을 도모함은 물론 2013 산청세계전통의약엑스포 성공적 개최를 위한 마을주변 환경정비 병행

□ 추진방향

○ 주민의견 수렴을 통한 사업선정 및 주민숙원사업의 우선 시행

○ 주변 생활환경 및 농업소득 증대와 관련한 사업 추진에 역점

□ 사업개요 및 추진계획

○ 사업개요

(단위:건/백만원)

구 분	사업량	사업비	비 고
계	233	12,867
재정건의사업	9	1,680	도의원
소규모주민숙원사업	189	8,391
2011 수해복구사업	35	2,796

○ 사업대상지 선정(주민협의) : 2011. 11월

○ 조사측량 및 설계 : 2011. 12월 ～ 2012. 1월

○ 사업시행 및 준공 : 2012. 2월 ～ 11월

□ 기대효과

○ 주민 편익증대 및 농촌지역개발에 따른 경제 활성화 촉진

○ 생활환경 개선과 생산기반시설 확충으로 소득증대 도모

○ 농촌지역 개발에 따른 경제 활성화 촉진

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
대상지선정, 설계 토지보상, 발주			토공, 기초공사, 구조물(80%)			포장공사, 사업마무리 및 준공 (100%)			사업마무리 및 준공 (100%)

교량 유지 및 기타도로사업

관내 노후 교량 유지․관리로 안전사고를 사전에 예방함은 물론, 군도및 농촌도로상 시설물 및 비탈면 절개지를 점검․보수로 교통사고를 미연에 방지코자 함

□  추진방향

○ 노후 교량 보수 및 교량 안전점검 실시로 안전사고 사전예방

○ 도로변 낙석․절개지 등 정비와 도로 유지보수로 교통사고 미연에 방지

○ 어린이보호구역내 교통안전시설물 정비로 교통사고 미연 방지

□  사업개요

사 업 명	사업량	사업비(백만원)	주요 사업내용	비 고
계	27	1,413
교량관리사업	16	550	천평교교량보수공사 외 교량점검용역
도로유지관리사업	7	753	도로유지보수,차선도색 등
주민숙원사업	4	110	소리당마을농어촌도로정비공사외3건

□  그간 추진사항

○ 2012년 1월 : 안전용역 실시 및 유지관리사업 설계

□  추진계획

○ 조사측량 및 실시설계 : 2012. 1월~3월

○ 사업착수 : 2012. 4월

○ 사업완료 : 2012. 12월

□  기대효과

○ 노후교량 보수 보강 및 교량유지관리로 안전사고 사전 예방

○ 위험구간 정비와, 안전한 통학로 확보로 교통사고 사전예방

□  분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
토지보상협의및착공 (20%)			교량유지보수및도로 유지관리,차선도색 등(60%)			도로유지관리(100%)

도로 교통안전 개선사업

관내 위험 도로 및 안전한 보행환경을 조성하여 교통소통에 원활을   기하고 위험요소를 사전 해소하여 주민편익증진 및 안전한 보행로     확보에 기여하고자 함

□ 추진방향

○ 급커브 및 도로 선형불량으로 인한 지구에 대하여 정비 추진

○ 보행량이 많은 학교주변 및 소재지 통행에 불편을 주고 있는 지구 정비

□ 사업개요

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(백만원)	비 고
계: 2건			740
마근담도로확포장공사외1건	시천면 사리	2개소	140
안전한보행 환경조성사업	금서면 향양	1개소	600

□ 그간 추진사항

○ 2012년 1월 : 조사측량 및 실시설계

□  추진계획

○ 보상협의 추진 : 2012. 1월~3월

○ 사업착수 : 2012. 4월

○ 사업완료 : 2012. 12월

□ 기대효과

○ 위험도로를 개선하여 교통사고 사전예방 및 지역균형발전에 기여

○ 안전한 보행환경 조성으로 주민편익증진 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
토지보상및착공(30%)			토공및구조물설치(60%)			구조물설치(80%)			포장및부대공사완료 (100%)

집중호우 도로시설 수해복구사업

2011.7.11~7.17 집중호우에 따른 도로시설 수해복구사업으로 조속한 사업 시행으로 우수기 이전 마무리하여 주민불편을 최소화 하고자 함

□ 추진방향

○ 도로시설 수해복구사업 우수기 이전 복구 완료토록 추진

□ 사업개요

사 업 명	위 치	사업량	사업비(백만원)	비 고
계: 2건			822
군도수해복구사업	금서면 신아지구외	2개소	750
농어촌도로수해복구사업	시천면 반천지구외	2개소	72

□ 그간 추진사항

○ 조사측량 및 실시설계 완료

□  추진계획

○ 사업착수 : 2012. 1월

○ 사업완료 : 2012. 8월

□ 기대효과

○ 도로시설 수해복구 우수기 이전 복구로 2차 추가 피해 예방

○ 도로통행 불편 해소로 주민 편익증진 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
토지보상및착공(30%)			토공및구조물설치(60%)			사업완료(100%) 도로포장

태풍무이파 수해복구사업

2011. 8.6 ~ 8.10 태풍 “무이파” 및 호우피해에 따른 도로시설 수해복구사업으로 조속한 사업 시행으로 우수기 이전 마무리하여 주민불편을 최소화 하고자 함

□ 추진방향

○ 도로시설 수해복구사업 우수기 이전 복구 완료토록 추진

□ 사업개요

사 업 명	위 치	사업량	사업비(백만원)	비고
계: 2건			3,587
군도수해복구사업	금서면방곡지구외	9개소	1,660
농어촌도로수해복구사업	시천면남대지구외	2개소	1,927

□ 그간 추진사항

○ 2012년 1월 : 조사측량 및 실시설계

□  추진계획

○ 사업착수 : 2012. 1월

○ 사업완료 : 2012. 8월

□ 기대효과

○ 도로시설 수해복구 우수기 이전 복구로 2차 추가 피해 예방

○ 도로통행 불편 해소로 주민 편익증진 도모

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
토지보상및착공(30%)			토공및구조물설치(60%)			사업완료(100%) 도로포장

국가지원지방도 선형개량사업(60호선)

도로 선형(차폭협소) 및 도로의 기하학구조를 선형 개량하여 도로 이용자들의 교통안전 확보 및 지역경제 활성화 등 지역주민의 장기적인 편익증진에 기여하고자 함

□ 추진방향

○ 급커브 및 도로 선형불량으로 인한 지구에 대하여 정비 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 금서면 특리 ~ 매촌리

○ 사 업 량 : 도로정비 L=1.22km

○ 사 업 비 : 3,182백만원

○ 사업기간 : 2010년 1월 ~ 2012년 12월

□ 그간 추진사항

○ 2011년 1,2차분 사업완료

○ 2011년 8월 3차분 사업시행

○ 교량가설 및 배수구조물 작업 완료 : 공정율 전체75%

□ 추진계획

○ 2012.02 ~ 03월 : 포장 및 부대시설 설치

□ 기대효과

○ 위험도로를 개선하여 교통사고 사전예방 및 지역균형발전에 기여

○ 주요 관광사적지(구형왕릉, 덕양전, 한방휴양관광단지)이용 관리

○ 지리산 국립공원 순환도로 기능제고

○ 선형 불량구간 개선으로 차량 통행 원활

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
구조물및포장완료(100%)

엑스포진입도로 선형개량사업

엑스포 행사장 진입로 및 연계도로 상에 굴곡부가 심한 지점의 선형을 개량하여 행사장을 찾는 외부탐방객들의 교통안전 확보와 국가 행사의 원활한 추진을 위한 진입도로 개량

□ 추진방향

○ 엑스포 행사장 진입로 급커브 및 도로 선형불량으로 인한 지구에 대하여 정비 추진

□ 사업개요

○ 위    치 : 금서면 특리 국지도60호선 지내

○ 사 업 량 : 도로선형개량  L=1.80km, B =11.0m(9.5m)

(산청군 L=1.7km, 경상남도: L=0.10km(교량L=43m))

○ 사 업 비 : 6,900백만원

○ 사업기간 : 2011년 07월 ~ 2013년 05월

□ 그간 추진사항

○ 2011년 07월 공사시행

○ 2011년 12월 : 비관리청도로공사 시행 승인

□ 추진계획

○ 2012년 1월현재 : 보상협의 추진(70%)

○ 2012. 1월 : 시공측량 완료 및 벌개제근중

○ 2013. 1월 : 공사준공 예정

□ 기대효과

○ 위험도로를 개선하여 교통사고 사전예방 및 지역균형발전에 기여

○ 엑스포 행사장 진출입로 선형개량으로 도로 이용률 증가

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
토지보상및착공(30%)			토공및구조물설치(60%)			구조물설치(70%)			포장및부대공사완료 (100%)

하도준설사업

지방하천의 재해위험 우려가 있는 하천제방 정비와 퇴적물을 준설하여 재해를 사전 예방하고, 쾌적한 하천환경을 조성 하고자 함

□ 추진방향

○ 미 정비된 하천을 정비하여 재해피해 예방

○ 하상에 퇴적된 퇴적토를 제거하여 호우시 월류피해 예방

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

대 상	계		2011년 시행		2012년 시행 계획		비고
	연장	사업비	연장	사업비	연장	사업비
계	L= 3.4km	4,250	L=0.5km	1,417	L=4.52km	2,416
갈전지구 하도준설사업	L= 0.8km	1,166	L= 0.3km	500	L= 1.62km	666
장박지구 하도준설사업	L= 0.7km	1,167	L=0.2km	500	L=1.49km	666
중산지구 하도준설사업	L=2.0km	917	보상지급	417	L=0.4km	667
덕천지구 하도준설사업	L=0.5km	500	-	-	L=1.01km	417

□ 그간 추진사항

○ 실시설계 완료(갈전,장박)

□ 추진계획

○ 보상협의 추진 : 2012. 2월~3월

○ 사업 착수 : 2012. 4월

○ 사업 완료 : 2012. 8월

□ 기대효과

○ 하천을 정비하여 집중호우로 인한 수해피해 예방과 재산 보호

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
설계, 대상지선정 부지매입			사업시행(60%) 토공, 구조물공			사업완료 (100%) 제방축조, 호안시공

소하천 정비사업

미 개수 소하천중 하폭이 협소하고 하천의 오염도가 심한 지구와 토사제방이 낮은 소하천의 재해우려 지구를 정비하여 재해를 사전에 예방하고 쾌적한 생활환경을 제공하고자 함

□ 추진방향

○ 하폭이 협소하고 굴곡이 심한 소하천을 정비 재해피해 예방

○ 친환경 소하천으로 정비하여 친수공간 활용

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

소하천현황		2011년 시행			2012년 시행 계획			비 고
개소	연장 (km)	개소	연장 (km)	사업비	개소	연장 (km)	사업비
199	248	5	2.1	2,996	1	1.0	1,500	내수풋가실

□ 그간 추진사항

○ 실시설계 및 주민설명회 완료

□ 추진계획

○ 보상협의 추진 : 2012. 1월~2월

○ 사업 착수 : 2012. 2월

○ 사업 완료 : 2012. 6월

□ 기대효과

○ 소하천을 정비하여 농경지 침수지역 예방

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
부지매입 및 사업시행(40%)			사업시행(100%) 제방 및 호안 시공

친환경 하천퇴적물제거사업

◇ 2011년 집중호우와 태풍“무이파” 내습으로 인하여 하천 퇴적물이      쌓여 하상이 숭상된 지역에 대하여 제방 범람의 위험 요소인 퇴적물과            유수지장물을 제거하여 수해피해를 예방하고

◇ 유수 선형이 변형되어 호안구조물에 기초세굴등의 시설물 피해가 발생

되고 있어 하도개량(물길돌리기)사업을 하여 하천관리에 만전

□ 추진방향

○ 집중호우로 숭상된 하상 퇴적토를 제거하여 재해피해 예방

○ 물길 돌리기 사업을 실시하여 하상세굴 방지

□ 사업개요

(단위 : 백만원)

위 치	사업량	사업비(백만원)	사업기간	비 고
계		500
금서면 특리	50,000㎥	300	‘12. 1 ~ ’12. 3
전읍면	별도 조사	200	‘12. 2 ~ ’12. 6

□ 추진계획

○ 2012. 2월 재해위험 취약지 조사 후 대상지 선정

○ 수해복구공사 성토재 활용 및 저지대 침수지역 성토

□ 기대효과

○ 하천통수 단면 확보로 원활한 유수 소통과 재해 예방

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업대상지 선정 및 사업시행(20%)			사업추진(100%) 퇴적토 제거

양천생태하천조성사업

◇ 원지소재지 주변에 여가시설과 친수공간을 확보하여 주민생활 만족도 제고

◇ 레저ㆍ스포츠 시설을 확충하여 주민의 건강과 복지증진에 기여

□ 추진방향

○ 인도교량을 우선 설치하여 지역명소 부각

○ 주민 친수공간을 조성하여 생활의식 고취

□ 사업개요

○ 위    치 : 산청군 신안면 하정리

○ 하 천 명 : 양천강(지방하천)

○ 사업규모 : 고수부지조성 1.5km, 자전거도로 3.0km,

인도교량 152m(‘12), 식생매트 715m

○ 사 업 비 : 6,676백만원(국비 4,006  도비 1,335  군비 1,335)

○ 사업기간 : 2011. 12. 28 ～ 2014. 12. 26

□ 그간 추진사항

○ 2011. 11월 국토해양부 총사업비 변경승인 완료

○ 2011. 12월 사업착수

□ 추진계획

○ 2012. 12월 인도교량 설치

○ 2013년 이후 고수부지 조성 및 자전거도로 추진

□ 기대효과

○ 하천통수 단면 확보로 원활한 유수 소통과 재해 예방

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업추진(20%) 기초터파기			사업추진(40%) 교량 하부구조물 설치			사업추진(60%) 교량 상부구조물 설치			사업추진(100%) 교량 상부구조물 마무리

재난 예․경보시설 구축사업

◇ 지구 온난화로 국지성 호우 빈발 및 피해 심화

◇ 산간 등 재해취약지역에 자동 예․경보시스템을 활용한 신속한 재난      상황전파

□ 추진방향

○ 산간 등 재해취약마을에 재난 발생 및 기상특보시 신속한 상황 전파    ○ 자동음성 통보시스템 활용으로 재난상황 등 각종 정보 제공

○ 지역특성을 고려한 맞춤형 재난상황관리

□ 추진계획

○ 사업대상지 선정 및 실시설계 용역 : 2012. 1 ～ 2월

○ 행정절차 이행 및 착공 : 2012. 2월

○ 사업 준공 : 2012. 5월말

○ 사업현황

(단위:건/백만원)

구 분	사업량	사업비	비 고
계	67	1,930
자동음성통보시스템	25	200
자동우량경보시설	42	1,730	기타 노후시설교체

□ 기대효과

○ 기상특보 등 신속한 재난상황 전파로 군민의 생명과 재산 보호

○ 적극적인 방재행정 추진으로 행정 신뢰도 향상

○ 마을 앰프방송을 통한 직접적이고 신속한 재해예방 및 군정홍보

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업대상지 선정 및 실시설계 용역, 착공			사업 준 공

자동기상관측장비(AWS)설치사업

◇ 자동기상관측장비(AWS) 설치로 기상상황 상시 감시

◇ 기상상황 5개 항목(풍향, 풍속, 온도, 습도, 강수량)을 수집 및 전파로      재해예방 및 인명피해 최소화

□ 추진방향

○ 기상관측표준화법에 적합한 기상관측시설 설치

○ 기상수집자료 기상청, 경상남도 관측자료 검증 및 공유

○ 기상관측 표준화 요건을 갖춘 관측소 위치 선정 및 설치

□ 사업개요

○ 대 상 지 : 2개 읍면

○ 사 업 량 : 자동기상관측장비(AWS) 2식

○ 사 업 비 : 60백만원

○ 사업기간 : 2012. 2월 ～ 6월

□ 추진계획

○ 사업대상지 선정 : 2012. 1월중

○ 설계용역 및 행정절차이행 : 2012. 2월중

○ 착공 및 준공 : 2012. 2월 ～ 2012. 6월

□ 기대효과

○ 정확한 기상관측 수집으로 군민의 재산과 생명보호

○ 기상관측자료의 기상청 검증으로 양질의 자료 공유

○ 국지성 기후 변화에 따른 기상상황에 신속대응

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
사업대상지선정 및 설계용역, 착공			준 공

불법 주․정차 질서 확립

읍면 소재지 불법 주ㆍ정차 차량 증가로 인한 교통소통 장애 등으로 교통불편이 가중되고 있어 교통소통의 원활을 기하고, 2013산청세계전통의약엑스포 성과 거양을 위한 기반을 조성코자 함

□ 추진방향

○ 군민 기초질서의식 제고

○ 2013 세계전통의약엑스포 성과거양을 위한 기반조성

○ 교통소통 원활을 통한 군민 교통불편 해소

□ 사업개요

○ 불법 주ㆍ정차 무인단속 시스템 효율적 운용

- 설치지역 : 4개소(군청앞, 군농협앞 , 산청농협앞, 구 전매서앞)

- 단속시간 : 08:00 ~ 19:00

○ 교통단속차량 구입

□ 그간 추진사항

○ 무인단속시스템에 의한 불법 주ㆍ정차  단속 : 652건

○ 교통단속차량 구입비 확보 - 소요 사업비 : 20,000천원

□ 추진계획

○ 차량구입 및 운행 : 2012. 2월중

□ 기대효과

○ 불법 주ㆍ정차 지도단속을 통한 교통불편 해소 및 2013 산청세계전       통의약엑스포 성공적 개최를 위한 기반 구축

□ 분기별 추진

1/4 분기			2/4 분기			3/4 분기			4/4 분기
불법주정차 단속			불법주정차 단속			불법주정차 단속			불법주정차 단속