주민생활지원실소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2014년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(주민생활지원실)

□ 총    평

❍ 산청군 노인․장애인 복지관 건립으로 맞춤형 통합서비스 제공 및 군민의 복지만족도 제고.

❍ 장묘문화 인식개선에 따른 화장률 증가와 화장 수요에 효과적으로 대응하고 주차공간을 확장함으로 장사시설 이미지 개선에 적극

노력하고 있음.

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	2		2
군 수 공 약 사 업	1		1
주요시책사업	1		1

□ 주요성과

❍ 산청군 노인․장애인 복지관 건립

- 2014. 11월 : 구)의료원 철거 완료

- 2014. 12월 : 2014년도 재정지원사업 및  2015년 군비 확보

- 2014. 12월 : 지방재정 투․융자심사 의뢰

❍ 산청군 공설묘지 공원화사업

- 2014. 6월 : 안치단 1,600단 설치

- 2014. 8월 : 리모델링(건물도색,출입문 및 지하층 내․외전면정비)

- 2014. 12월 : 증축 봉안당 차폐식재 및 시설내 조경

□ 반    성

❍ 다양한 계층의 요구에 대한 반영 공간 제약

❍ 군 관리계획 재 정비등 소요기간 지연

□ 향후 추진계획

❍ 산청군 노인․장애인 복지관 건립

- 2015. 2월 : 기본 및 실시설계 완료

- 2015. 12월 : 준공

❍ 산청군 공설묘지 공원화사업

- 2015. 2월 : 증축 봉안당 앞 주차장 포장 완료

- 2015. 8월 : 배수시설 및 순환도로 개설

구 분	공약사업
담당부서	주민생활지원실(희망복지담당)
추진진도(%)	30%

3

산청군 노인․장애인 복지관 건립 산청케이블카 설치

❍ 우리군은 노인 및 장애인의 종합복지 활용 공간이 전무하여 수요계층의

불편함이 많음. 군 소유 부지(구.보건의료원)를 활용한 적정 규모의 노인․

장애인 복지관을 건립하여 군민의 복리증진 및 건강한 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 산엔청로 67(舊 보건의료원)

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2015. 12(2년)

❍ 사 업 량 : 건물 1동 신축

- 부지면적 : 3,366㎡

- 건물 연면적 : 1,801㎡(지상3층)

❍ 사 업 비 : 46.44억원(분권교부세8.44 기금9.19 도비10.0 군비18.81)

□ 추진사항

❍ 2013. 05월 : (구)보건의료원 건물 안전진단 실시

❍ 2013. 09월 : 노인․장애인복지관 건립(구,의료원 리모델링)계획 수립

❍ 2013. 10월 : 군자체 지방재정 투․융자심사 승인(31억원)

❍ 2013. 11월 : 2013~2017년 중기지방재정계획 반영(31억원)

❍ 2014. 01월 : 2014년도 분권교부세 대상사업 확정

❍ 2014. 02월 : 구)보건의료원 건물 활용 부서의견 수렴

❍ 2014. 02월 : 노인․장애인복지관 건립(신축)계획 수립

❍ 2014. 03월 : 공유재산 관리계획 수립 및 승인

❍ 2014. 04월 : 2015년도 복권기금사업 신청 및 확정

❍ 2014. 02월~6월 : 관련단체 사업설명(3회), 주민공청회 개최(1회)

❍ 2014. 06월 : 복지관 건립 군정조정위원회 심의(신축)

❍ 2014. 05월~7월 : 타 지자체 복지관 견학(관련공무원 및 단체)

❍ 2014. 07월 : 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2014. 10월 : (설계용역업체 동반) 타 지자체 복지관 견학

❍ 2014. 10월 : 2015~2019년 중기지방재정계획 반영(46억원)

❍ 2014. 11월 : 구)의료원 철거 완료 및 복지관 건립 관련단체 중간 설명회

❍ 2014. 12월 : 2014년도 재정지원사업 및 2015년 군비 확보

❍ 2014. 12월 : 지방재정 투․융자심사 의뢰(도 재심사 : 사업비 증가)

□ 문제점 및 대책

❍ 노인․장애인복지관 통합운영 시 장애인 이용자의 상대적 소외감	및 노인과 장애인 간의 갈등 표출 다소 우려되나,

⇒ 우리군 인구 밀집도, 수혜대상자 수 등을 감안하여 적정규모의	복지관 건립으로 운영의 효율화를 도모하고,

⇒ 층별 노인과 장애인 전용 공간 확보 등 수요자 중심의 편의시설     및 다양한 프로그램 반영으로 수요층 불편 적극 해소

□ 향후 추진계획

❍ 2015. 01월 : 건축허가(문화재현상변경) 완료

❍ 2015. 02월 : 기본 및 실시설계 완료

❍ 2015. 02월 : 공사 착공

❍ 2015. 12월 : 준공

구 분	주요시책사업
담당부서	주민생활지원실(노인복지담당)
추진진도(%)	80%

4

산청군 공설묘지 공원화사업 추진

❍ 장묘문화 다변화에 따른 우리군 장사시설 수급계획 사전반영

❍ 주변지역 토지매입으로 증축 봉안당 차폐막 수목식재 등 편의시설 설치

□ 사업개요

❍ 위    치 : 신등면 신등가회로 357-17번지 일원

❍ 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2015. 12월(2년간)

❍ 총사업비 : 1,310,650천원(군비)

❍ 사업내용 : 토지 등 매입, 안치단 설치, 무연고자 합동안치, 1동 리모델링,

군 계획시설(봉안시설)인가, 매입토지 조경, 배수시설 및 순환도로 개설

□ 추진사항

❍ 토지매입 등 보상 : 11필지 13,752㎡ / 478,230천원

❍ 안치단 설치 : 1,600단(부부단224포함) / 127,179천원

❍ 무연고자 합동안치 : 400구 / 2,000천원

❍ 1동 리모델링( 출입문 정비, 지하층 내․외 전면 정비, 건물 도색) 완료/118,239천원

❍ 매입토지 활용

- 성토작업 완료 : 7필지 8,329㎡ / 40.276천원(2015. 6월까지 유상임대)

- 사업시기 미도래 : 3필지 4,886㎡ (유상임대 / 벼 재배)

- 월평마을 농기계보관창고 활용 : 1필지 537㎡(농업지원과 인계)

❍ 증축 봉안당 차폐식재 및 시설 내 조경 : 31,273천원

□ 문제점 및 대책

❍ 군 관리계획(재정비)결정 및 실시계획인가에 따른 공원화사업 지연

⇒ 2015.8월경 군 관리계획(재정비)결정 후 실시계획 및 사업추진

□ 향후 추진계획

❍ 증축 봉안당 앞 주차장 포장 : 2015. 2월한

❍ 군 관리계획 시설(봉안시설)실시계획인가 : 2015. 8월이후

❍ 매입토지 조경, 배수시설 및 순환도로 개설 : 2015. 8월이후