건설과 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2014년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(건설과)

□ 총    평

❍ 민생 현안 사업의 적극적인 추진으로 주민 편익증진 및 지역균형

발전에 기여

❍ 대체로 임기중 공약사업이 완료가능하며 연차적 사업 시행으로

사업이 조기에 마무리 될 수 있도록 공약사업은 정상 추진중임

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	30	1	21	8
군 수 공 약 사 업	28	1	19	8
주요시책사업	2		2

□ 주요성과

❍ 삼장~산청국도건설공사(국도59호 밭머리재터널) 추진

❍ 20호선 신안~생비량간 국도건설공사 추진

❍ 덕천강 고향의 강 조성사업 추진

❍ 양천 생태하천 조성사업 준공

□ 반    성

❍ 주민이 공감하는 건설행정 추진이 미흡

❍ 국·공유재산 지적정리사업 소극적 대처

□ 향후 추진계획

❍ 민선6기 군정방침에 따라 군민을 위한 행정을 최우선 목표로

업무추진

❍ 국·공유재산 지적정리사업 추진시 지속적인 주민설득으로 기부         채납 적극적인 행정업무 추진

구 분	공약사업
담당부서	건설과(건설행정담당)
추진진도(%)	30%

32

내리 마당재 진입로 확․포장공사

❍ 최근 귀농인구의 증가로 새롭게 조성되고 있는 마을들이 늘고 있지만

진입도로 등의 협소로 통행에 불편을 초래하고 있어 금회 사업을 통해

귀농인들의 편의를 도모하고 마을환경을 개선코자 함.

□ 사업개요

❍ 기   간 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 내리 일원

❍ 사 업 비 : 200백만원

❍ 사 업 량 : 진입도로정비 L=500m, B=6m

□ 추진사항

❍ 2014년. 10월 ~ 12월 : 사업예산확보

❍ 2015년. 01월 ~ 02월 : 실시설계용역시행 및 편입부지 협의

❍ 2015년. 03월 ~ 12월 : 사업착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 도로확장은 기존 주택으로 인해 하천측으로 확장이 불가피함에       따라 하천단면을 확보하면서 도로를 확장해야 하는 어려움이 있       으며 사업비 과다하게 소요될 수 있음으로 최적 방안을 강구토록

하겠음.

❍ 기존 도로가 사유지임에 따라 토지소유자와 지속적 협의가 필요함.

□ 향후 추진계획

❍ 편입 토지소유자와의 보상협의

❍ 협의완료시 사업 착공

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	5%

33

물산,수청마을 주리불골세천정비사업

❍ 신등면의 물산 ․ 수청 등 마을내 소하천이 굴곡이 심하고 하폭이   작아 적은 강수량에도 매년 수해가 발생하고 있어 하천을 정비  하여 수해피해를 예방하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 일원

❍ 사 업 비 : 2,900백만원(국비1,450,지방비1,450)

순위	사 업 명	연 장	사 업 비	사업기간	비고
계		L = 2.2km	2,900,000천원
1	물산소하천 정비공사	L=1.2km	1,400,000천원	2015~2016
2	수청소하천 정비공사	L=1.0km	1,500,000천원	2017~2018

□ 세부추진계획

❍ 2015. 01 ~ 03 : 실시설계 용역

❍ 2015. 03 : 사업 시행

❍ 2018. 12 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 전구간 개수사업은 사업비 과다로 인한 예산(군비) 확보가 어려워        2015년 사업비 3.5억원으로 위험구간 우선 시행

□ 기대효과

❍ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

❍ 쾌적한 환경정비로 삶의 질 향상에 기여

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	20%

34

덕천강 고향의 강 조성사업

❍ 우리군 대표 하천인 덕천강을 대상으로 지역의 역사와 문화, 생태 기능을

연계하여 어릴 적 고향의 정취를 만끽할 수 있는 정감 어린 다기능  복합

친수공간으로 조성하는 계획임

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 ~ 삼장면 대포리

❍ 하 천 명 : 덕천강(지방하천)

❍ 사업규모 : L=5.1km(하도정비 3.38km, 자전거도로 4.46km,

하천환경정비 4개소, 보개량 및 재가설 3개소)

❍ 사 업 비 : 27,058백만원(국비16,235, 도비3,247, 군비7,576)

❍ 사업기간 : 2011. 10월 ~ 2017. 12월

□ 세부추진계획

❍ 2013. 11 ~ 2014. 12 : 편입부지(141필지) 보상협의

❍ 2015. 07 : 사업 시행

❍ 2017. 12 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 부족으로 인한 토지보상협의 등 사업 추진 애로

□ 기대효과

❍ 친화적인 하천환경 정비와 친수공간 제공으로 인한 주민들의 여가       생활 증가

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	5%

35

차황면 소하천 6개소 사업

❍ 산청군의 산간 오지중 하나인 차황면의 마을내 소하천이 굴곡이

심하고 하폭이 작아 적은 강수량에도 매년 수해가 발생하고 있어

하천을 정비하여 수해피해를 예방하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면

❍ 사 업 비 : 1,520백만원(지방비1,520)

순위	사 업 명	연 장	사 업 비	사업기간	비 고
계		L = 3.2km	1,520,000천원
1	금포림소하천정비공사	L=600.0m	240,000천원	2015
2	창평앞들소하천 정비공사	L=600.0m	240,000천원	2015
3	실매소하천정비공사	L=400.0m	160,000천원	2016
4	남산들소하천정비공사	L=600.0m	360,000천원	2016
5	황매소하천정비공사	L=600.0m	360,000천원	2017
6	평지들소하천정비공사	L=400.0m	160,000천원	2017

□ 세부추진계획

❍ 2015. 01 ~ 03 : 실시설계 용역

❍ 2015. 03 : 사업 시행

❍ 2017. 12 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비(군비) 과다로 인한 잔여(14.2억원) 예산 확보 애로

❍ 기존 소하천 사업 시 주민 동의에 의한 사업 진행으로 금회 사업 시     농경지 편입등 토지 보상비 과다 우려

□ 기대효과

❍ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

❍ 쾌적한 환경정비로 삶의 질 향상에 기여

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	5%

36

덕천강(덕교앞) 수중보 설치

❍ 삼장면 덕교리 다목적캠핑장의 활성화로 인한 캠핑객 및 피서객이   증가하고 있으나 덕천강 내 물놀이를 즐길 수 있는 공간이 없어   인공적인 시설물 설치로 피서객의 편의증진으로 지역 활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 덕교리

❍ 하 천 명 : 덕천강(지방하천)

❍ 사업규모 : 수중보 L=50m

❍ 사 업 비 : 500백만원(지방비 500)

❍ 사업기간 : 2015. 01월 ~ 2015. 12월

□ 세부추진계획

❍ 2015. 01 ~ 2015. 03 : 실시설계 용역 시행

❍ 2015. 04 : 사업 착공

❍ 2015. 12 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 2015년 사업비 1.5억원 확보로 수중보 설치 계획이나 수중보 설치          위치의 하천 퇴적물로 인한 추경시 추가 예산 확보가 필요함.

□ 기대효과

❍ 물놀이 공간 조성으로 캠핑객 및 피서객의 증가로 인한 지역 활성화에 기여

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	5%

37

계남천 지방하천 정비사업

❍ 하천 하폭이 협소하고 굴곡이 심하여 적은 양의 강우에도 매년 수해가 발생하고 있어 하천을 정비하여 수해피해를 예방 하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 계남리 일원

❍ 하 천 명 : 계남천(지방하천)

❍ 사업규모 : 하천정비 L=600m(양안)

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(군비2,000백만원)

❍ 사업기간 : 2015. 01월 ∼ 2018. 12월

□ 세부추진계획

❍ 2015. 01 ~ 03 : 실시설계용역

❍ 2015. 04 : 사업 시행

❍ 2018. 12 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 계남천 전체 정비사업은 경상남도 지방하천 개수사업의 우선순위가 후순위로 인한 도비 확보가 어려운 실정이며 우선 위험지구의 사업의 사업비(군비) 과다로 인한 예산 확보가 어려움 실정임

□ 기대효과

❍ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

❍ 쾌적한 환경정비로 삶의 질 향상에 기여

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	5%

38

남강변 하천 뚝방길 조성

❍ 하천제방의 뚝방길 조성으로 주민의 산책로 및 여가공간을 위한 친수공간 확보와 주요 농업용 농로 등 주민편익 증진으로 하천  이용률 증대와 꽃단지 조성 등으로 아름다운 하천변 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 강누리 ∼ 관정리

❍ 하 천 명 : 남강(국가하천)

❍ 사업규모 : L=8.0km(포장 L=8.0km)

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(군비1,500)

❍ 사업기간 : 2015. 01월 ∼ 2016. 12월

□ 세부추진계획

❍ 2014.7~2015.6월 꽃단지 조성을 위한 국가하천내 예정지 관련 관련부서 협의

❍ 단성면 소재지권 정비사업과 연계하여 사업추진

❍ 조경수종(배롱나무, 산수유, 이팝나무 등) 관련 산림부서 협의 후 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 조경수 식재에 따른 부산지방국토관리청 협의 필요

□ 기대효과

❍ 친화적인 하천환경 정비와 친수공간 제공으로 인한 주민들의 여가          생활 증가

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	5%

39

덕천강(사리~중태) 독다리 설치공사

❍ 국도20호와 중태마을 사이 교량이 없어 시천 소재지로 5km 가량

우회하므로 덕천강 내 독다리 설치로 주민 불편을 최소화 하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리

❍ 하 천 명 : 덕천강(지방하천)

❍ 사업규모 : L=150m

❍ 사 업 비 : 200백만원(지방비200)

❍ 사업기간 : 2015. 01월 ∼ 2015. 12월

□ 세부추진계획

❍ 2015. 01 ~ 03 : 실시설계용역

❍ 2015. 04 : 사업 시행

❍ 2015. 12 : 사업 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 2015년 1.5억원의 예산을 확보하였으나 덕천강 고향의 강 조성사업의 가동보 설치와 인접하여 가동보 설치 시 사람이 지나 다닐 수 있는 독다리 설치 검토

□ 기대효과

❍ 독다리 설치로 인한 주민 통행 불편 해소

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	10%

40

국도20호 확ㆍ포장사업 조기 완성

❍ 국도20호선 『단성~시천간』,『신안~생비량간』의 급격한 커브와 굴곡심화로 교통사고 위험이 많으며, 특히 단성 호국원 개원에 따른 교통량 증가로 잦은 차량 정체가 예상되므로 조기 도로 확,포장이 시급함.

사 업 명	위 치	사 업 량	사업비(억원)	비 고
단성~시천간	단성면 사월리~ 시천면 사리	L=9.913km B=19.5m	1,211
신안~생비량간	단성면 강누리~ 생비량면 도리	L=9.2km B=19.5m	1,278

□ 사업개요

□ 추진사항

❍ 「단성~시천간」

- 기본설계 완료 2015년 실시설계 착수 예정

- 2015년 실시설계비 5억 확보

❍ 「신안~생비량간」

- 2014. 7월 실시설계 완료

- 2015년 5억4천 확보 보상협의 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 단성~시천간의 ‘15년 3월 .산청국립호국원(남사) 개원시 교통체증     가중 우려

❍ 단성~시천간 2015년 실시설계 지구로 선정 ⇒ 실시설계비 부족     으로 사업장기화 우려 사업비 증액 확보에 지속 노력

□ 향후 추진계획

❍ 단성~시천간 2015년 실시설계 착수

❍ 신안~생비량간 2015년 보상협의 추진

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

415

국도3호선(골프장옆)램프박스 확장  확ㆍ포장사업 조기 완성

❍ 지리산 관문인 국도3호선(진주→원지)통로암거(4.5×4.5)로서 램프   구간 굴곡이 심하고 곡선 종점부에 통로암거가 위치하여 대형차량  진입시 통로암거와 잦은 충돌이 발생하고 있으며, 또한 보행자의    안전사고 위험이 상존하고 있어 통로암거 확장이 필요함.

□ 사업개요

❍ 위  치 : 산청군 신안면 하정리 하정램프(국도3호선~원지)

❍ 사업량 : 통로암거: 8.0×4.5, 가도개설 : L=300m,B=9.5m

❍ 사업비 : 30억원(사업비 28억원, 보상비 2억원)

□ 추진사항

❍ 진주국토관리사무소에 국도병목지점개량사업 기본계획 반영토록     건의

□ 문제점 및 대책

❍ 진주국토관리사무소에 건의결과 향후 국도병목지점개량사업       기본계획 5개년(‘18~’22)계획 재수립 시 반영계획으로 사업 조기 시행    불가 ⇒ 사업 조기 반영 될 수 있도록 지속 노력

□ 향후 추진계획

❍ 진주국토관리사무소에 조기 반영토록 지속 건의

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	60%

4275

오부선돌재(내곡)굴곡도로개량사업

❍ 지방도1026호선으로 도로굴곡이 심하고 경사가 급하여 교통사고    위험성이 높고 도로의 주행성이 나빠 도로로서의 기능이 원활치    못하여 굴곡구간 개량을 통하여 주행성을 개선하고 교통사고를 예방  코자 함.

□ 사업개요

❍ 공사명 : 오부선돌재(내곡)굴곡도로개량사업

❍ 위  치 : 산청군 오부면 내곡리

❍ 사업량 : L=1.19km(기정비 L=0.74km. 잔여 L=0.45km)

❍ 사업비 : 2,220백만원(도비 2,220백만원)

단위:백만원

총사업비	2013까지	2014년	2015년이후	비고
2,220	1,500	200	520

❍ 사업기간 : ‘10. 01. ~ ’15. 12

□ 추진사항

❍ ‘13년 이전 : 1.19km 중 0.74km 시공완료

❍ 잔여구간 행정절차(비관리청 시행인가) 완료

❍ ‘14. 2월 : 사업비 2억 확보

❍ ‘14.11.12 1차분 사업 착수

❍ 2015년 경남도 당초 예산 400백만원 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 120백만원 미확보로 사업 완공차질 우려

⇒ 2015년 추경 예산에 부족예산 확보 노력

□ 향후 추진계획

❍ ‘15년 8월 : 도비 추가 확보 후 사업 완료 예정

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	10%

435

오휴~대현간도로확포장공사

❍ 오부면 오휴와 대현을 연결하는 도로가 없어 버스가 장시간 우회를 함으로 인하여 주민들이 통행 불편을 겪고 있어 도로를 개설하여 주민통행 불편을 해소하고 낙후된 농촌 균형발전과 주미들의 숙원 사업을 해소코자 함.

□ 사업개요

❍ 기  간 : 2015. 2월 ~ 2016. 6월

❍ 위  치 : 산청군 오부면 중촌리~대현리

❍ 사업량 : 도로확포장 L=0.60km, B=6.5m

❍ 사업비 : 960백만원(사업비 740, 보상비 200, 기타 20)

❍ 현재진도 : 보상 협의 중(총필지 34필지,보상협의 31필지)

□ 추진사항

❍ 기 보상비 2억 확보 추진

❍ ‘15년 사업비 600백만원 확보 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 미 보상 토지 협의 지연 지속 협의 추진중

❍ 마사토 채취구간(L=250m)산지 복구 부분이 안정되지 않아 도로     개설시 사면 붕괴 우려가 있음 ⇒ 공사중 사면유실이 없도록        사면을 완만히 하여 도로개설사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 3월 사업 착수 예정

❍ 2016년 잔여사업비 확보 후 사업 완료 예정

구 분	시책사업
담당부서	건설과(교통행정)
추진진도(%)	80%

4460421

산청버스 종합터미널 확장사업

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청리 227-1 일원

❍ 사 업 량 : 부지조성 2,514㎡, 건축면적 385㎡

❍ 사업기간 : 2011 ～ 2015(4년간)

❍ 사 업 비 : 총4,450백만원

(단위:백만원)

재원별	총사업비		기 투자		2015년계획		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	․편입물건 매입 - 16건 ․종합터미널 조성: 2,514㎡	4,450	․편입물건 보상 -완료:8건,1,162㎡ ․터미널건축:285㎡ ․정류장정비:2,514㎡	2,450	․주차장공사: 225㎡	2,000
도비		1,300		1,300		-
군비		3,150		1,150		2,000

□ 추진계획

❍‘14. 1월～9월 : 설계변경 및 보상협의

❍‘14.  9월     : 보상완료

❍‘14. 11월     : 공사 착공

❍‘15. 3월      : 공사 준공 예정

□ 문제점 및 대책

❍ 추가보상 협의 기간 지연 및 동절기 시공 중단으로 당초 준공예정일‘14. 10월에서 ‘15. 3월로 공기 연장되었음. 가능한 빠른 시일 내에 준공될 수 있도록 사업추진 중.

□ 기대효과

❍ 산청종합터미널 주차장 추가조성으로 대중 교통 이용객의 편익 증진 및  대중교통 활성화

구 분	시책사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	10%

45

밤머리재 터널 조기 개설

❍ 기존 국도 59호선 (산청군 삼장면 상촌리~금서면 평촌리)은 해발 600m 산악 도로로서 급경사와 심한 굴곡으로 대형 교통사고 발생위험과 겨울철 상습 결빙 구간으로 도로기능 상실에 따른 터널개설 및  선형개량이 시급한 실정임.

□ 사업개요

❍ 기   간 : 2015. 7월 ~ 2020. 12월

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리~금서면 평촌리(국도59호)

❍ 사업현황 : L=6.02km(터널 1개소 L=3.01km, 접속도로 L=3.01km)

❍ 사 업 비 : 1,039억원(공사비 999억원, 보상비 40억원)

□ 추진사항

❍ ‘07. 11. 29 ~ ’09. 12. 28 : 기본설계 용역완료

❍ ‘10. 03. 18 : 타당성재조사 통보( 기획재정부 → KDI)

❍ ‘10. 09 ~ '10. 12월 : 타당성재조사 (KDI)

❍ ‘11. 03 : 타당성재조사결과  BC=0.78, AHP=0.51로 통과

❍ ‘11. 09 : 삼장~산청국도건설공사(밤머리재터널구간) 실시설계 용역

※ 용역기간 : 2011. 12. ~ 2013. 8. (용역완료)

❍ ‘15년 사업비 60억4천1백만원 확보

❍  ‘15. 1월~6월 적격업체 선정 및 행정절차 이행

□ 문제점 및 대책

❍ 대규모 건설사업으로 예산 확보 애로

- 사업이 조기 완공될 수 있도록 연차별 사업비 확보 노력

□ 향후 추진계획

❍ 공사착수 : 2015. 7월. (예정)

❍ 공사준공 : 2019. 12월. (예정)

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

46

국지도60호(화계~동의보감촌)선형개량사업오휴~대현간도로확포장공사

❍ 국지도60호선 산청~함양 구간중 도로가 굴곡이 심하고 급경사로    위험구간이 많아 교통사고 위험이 상존하고 있으며, 겨울철 상습    결빙으로 통행에 불편을 느끼고 있어 선형개량이 시급한 실정임.

□ 사업개요

❍ 공사명 : 국가지원지방도60호선 굴곡도로 선형개량사업

❍ 위  치 : 산청군 금서면 신아리~화계리

❍ 사업량 : 도로선형개량 L=3.50km, B=8.0m

❍ 사업비 : 70억원(국․도비)

□ 추진사항

❍ 경상남도에 중장기적으로 제4차 국지도5개년(‘16~’20) 사업 반영 건의

❍ 중장기 계획 반영이 어려울 경우 도 자체사업으로 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 경남도 재정 악화 및 사업비 과다 소요로 도비 확보 애로

⇒ 특교세 건의 등 예산확보를 위한 다각적인 노력 필요

□ 향후 추진계획

❍ 제4차 국지도5개년(‘16~’20)사업 반영 및 도 자체사업 반영 노력

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

47

주상~자혜간 도로숭상 및 확ㆍ포장공사

❍ 지방하천(임천)과 연접한 도로(군도15호)로서 폭이 협소(B=4.0m)   하고 집중호우시 하천 범람으로 도로가 침수되어 차량통행이 불가  하며, 수시로 낙석이 발생하여 재해 위험이 많은 도로임.

□ 사업개요

❍ 공사명 : 주상~자혜간 도로숭상 및 확ㆍ포장공사(군도15호)

❍ 위  치 : 산청군 금서면 주상리~자혜리

❍ 사업량 : 도로확포장 L=2.0km, B=8.0m

❍ 사업비 : 83억원(도로부분 공사비)

□ 추진사항

❍ 2014. 5월 : 경상남도에서 임천지구 수해상습지 개선사업에 포함     하여 실시설계 완료

❍ 2014. 7월 경상남도와 국토교통부 총사업비 협의 시 도로부분 제외

□ 문제점 및 대책

❍ 경상남도와 국토교통부 총사업비 협의 시 도로부분 제외로 사업      반영 애로⇒ 지역주민들과 사업 반영이 될 수 있도록 지속건의

□ 향후 추진계획

❍ 제외된 도로부분 사업 반영이 될 수 있도록 정부에 지속 건의

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	30%

48

내수~매곡간 도로 확ㆍ포장공사

❍ 산청읍 내수리와 차황면 매곡리를 연결하는 군도8호선 미 연결   구간에 대하여 도로 확․포장을 하여 지역간 균형발전 및 지역주민의 편익증진에 기여코자 함

□ 사업개요

❍ 기  간 : 2014. 2월 ~ 2017. 2월

❍ 공사명 : 내수~매곡간 도로 확ㆍ포장공사(군도8호)

❍ 위  치 : 산청군 산청읍 내수리 ~ 차황면 매곡리

❍ 사업량 : 도로확포장 L=2.3km, B=8.0m

❍ 사업비 : 41억원(기확보23.5, 잔여사업17.5억원)

□ 추진사항

❍ 2014. 3월 : 기 설계구간 1.8km에 대한 공사착수

❍ 2014. 8월~11월 : 잔여구간 0.5km에 대한 설계 완료

❍ 2015. 2월 ~ 12월 : 잔여구간 보상시행

❍ 2017. 5월 : 기 공사구간 완공

❍ 2017. 7월 ~ 2018. 6월 : 잔여구간 공사시행 후 개통

□ 문제점 및 대책

❍ 군도로서 자체사업비로 시행하여야 하나 미 확보예산 17.5억원     확보 애로

⇒ 추진계획에 따라 년차적으로 예산확보 시행

□ 향후 추진계획

❍ 2015. 3월 : 본 공사 2차분 발주(12억 확보)

❍ 2015. 3월~12월 : 잔여구간 보상협의 추진

구 분	공약사업
담당부서	건설과(건설행정담당)
추진진도(%)	30%

49

내원도로 확포장공사

❍ 삼장면 내원리 마을 진출입 도로구간이 경사가 급하고 동절기 잦은

강설로 통행이 불가하는 등 주민들 생활에 지장이 있어 금회 사업을

통해 주민들의 편의를 제공하고 숙원을 해소코자 함.

□ 사업개요

❍ 기     간 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 내원리 내원마을 일원

❍ 사 업 비 : 250백만원

❍ 사 업 량 : 아스콘덧씌우기 L=3.3km

□ 추진사항

❍ 2014년. 10월 ~ 12월 : 사업예산확보

❍ 2015년. 01월 ~ 02월 : 실시설계용역시행 및 편입부지 협의

❍ 2015년. 03월 ~ 12월 : 사업착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 사업대상 구간이 긴만큼(L=3.3km) 사업예산 등을 고려하여 시급

한 구간을 중심으로 사업추진토록 하겠음.

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계 및 사업 착공

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

50

명상교 재가설공사

❍ 삼장면 평촌리 군도9호선에 위치한 세월교로서 1971년에 가설되었  으며 현재 교량상태가 D급 특정관리 시설물로 노후 되어 있으며,   적은 양의 호우에도 교량이 범람하여 지리산과 대원사를 찾는 내방  객들을 안전사고 위험이 노출되어 있어 교량 재가설이 필요함.

□ 사업개요

❍ 공사명 : 명상교 재가설공사

❍ 도로명 : 군도9호(명상~유평선)

❍ 위  치 : 산청군 삼장면 평촌리

❍ 사업량 : 교량 L=60m, B=9.0m. 도로 300m

※ 기존교량 L=48m,B=9.0m. 교량 등급 : D급(보수ㆍ보강필요)

❍ 사업비 : 50억원 추정

□ 추진사항

❍ 단기적으로 교량 점검 보수 및 안전시설 설치를 통한 안정성 확보

(홍수시 우회 통행)

- 2014. 5월 : 교량상부 안전시설 설치(차선규제봉 38개)

❍ 중,장기적으로 사업비 확보 방안 강구 후 사업 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 사업비 과다 소요로 사업비 확보 애로

⇒ 중,장기적으로 사업 추진을 검토하고 향후 재해위험지구 지정을      통한 사업 추진등 국비 지원을 받을 수 있는 방안 강구

□ 향후 추진계획

❍ 중,장기적으로 사업 추진 검토 및 재해위험지구 지정을 통한 사업     추진 계획도 검토

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

51

제보지구 도로확포장사업 조기 완공

❍ 생비량면 제보리 관동마을 진입도로로서 지방하천 제보천의 제방  겸용 도로이며, 집중호우시 잦은 도로 유실이 발생하고 있으며 도로  폭이 협소하고 지반 침하로 차량통행 불편과 교행에 어려움이 많아 도로 확,포장이 필요함.

□ 사업개요

❍ 공사명 : 제보지구 도로확포장사업

❍ 도로명 : 군도28호(화현~간공선)

❍ 위  치 : 산청군 생비량면 제보리~관동마을

❍ 사업량 : 도로 L=3.61km, B=8.0m. 교량 2개소(기완료 1.11km)

❍ 사업비 : 50.5억원 추정(기투자 10.5억원)

□ 추진사항

❍ 전체 3.61km중 1.11km 사업 완료

❍ 잔여 구간(2.5km)은 군도 건설관리계획 재 수립시 반영하여 중,      장기적으로 추진

□ 문제점 및 대책

❍ 기존도로가 하천정비기본계획상 하천구역내로서 도로 개설시 하천       공사와 병행하여 시행되어야 함

❍ 수혜도(8가구)에 비해 사업비가 과다 소요되며, 사업비 확보에 어        려움이 있음.

⇒ 중장기 기본계획(군도건설관리계획)에 반영 연차적으로 사업추진

□ 향후 추진계획

❍ 사업비 과다 소요로 중,장기적 검토

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

52

갈전~둔철간도로확ㆍ포장공사

❍ 신안면 안봉리와 둔철마을을 연결하는 군도24호선이며, 임도로     개선설된 미 포장 구간으로 폭이 협소하고 도로굴곡이 심하여     통행에 어려움이 있으므로 도로 정비가 필요한 실정임.

□ 사업개요

❍ 공사명 : 갈전~둔철간도로확ㆍ포장공사

❍ 도로명 : 군도24호선(신안~단계선)

❍ 위  치 : 산청군 신안면 안봉리~둔철마을

❍ 사업량 : 도로 L=1.85km, B=4.0(미포장 L=1.1km,B=4.0m)

❍ 사업비 : 도로확․포장시 35억원(임도포장시 1.5억원)

□ 추진사항

❍ 2015년 미포장 구간 L=1.1km 주민숙원사업비 확보(1.5억원)

❍ 도로확포장은 군도 건설관리계획에 의거 중,장기적으로 검토

□ 문제점 및 대책

❍ 도로확포장시 사업비 확보 및 보상협의 관계로 사업 장기화 우려

⇒ 주민통행 불편이 없도록 미 포장구간 우선 콘크리트포장 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2015. 1월~2월 : 설계용역 추진 및 보상협의

❍ 2015. 3월 : 사업 착수 예정

구 분	공약사업
담당부서	건설과(농업기반담당)
추진진도(%)	10%

53

황매산 입구 편의시설 확충

❍ 저수지 둑 높이기 사업으로 추진 중인 율현, 손항지구 주변에    수변공원 및 휴식공간을 조성하는 등 방문객 및 주민 편의시설 확충

❍ 주민 생활환경 개선 및 지역소득 증대에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 상법리, 신등면 장천리, 율현리

❍ 사 업 량 : 수변공원, 정자, 파고라, 등 각1개소, 주차장 1,700㎡

❍ 사 업 비 : 13.7억원 (국비 100%)

❍ 사업기간 : 2015. 01 ~ 2015. 12(1년간)

❍ 시행구분 : 한국농어촌공사 진주‧산청지사

□ 추진사항

❍ ‘14. 12 : 주민 및 관련부서 협의 완료, 사업계획 협의 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 손항지구는 둑높이기 사업 중 당초 수변공원 계획이 현 지형       여견과 부적합하여 추진애로

❍ 율현지구는 농촌개발사업인 창의아이디어사업과 연계추진 필요

⟹ ‘14. 12월까지 주민 및 관련부처 협의 완료로 사업계획 협의 완료

□ 향후 추진계획

❍ ‘15년 01월 : 착공

❍ ‘15년 12월 : 준공

구 분	공약사업
담당부서	건설과(농업기반담당)
추진진도(%)	20%

54

방곡지구 저수지 용수개발사업

❍ 하천용수를 이용하고 있는 산청군 북부권역 농촌용수 공급에   애로 소규모 하천으로 용수원이 부족하여 매년 한발을 겪는    한해 상습지역임

□ 사업개요

❍ 위   . 치 : 산청군 금서면 방곡리 일원

❍ 수혜면적 : 350ha(신규 : 124ha, 보강 : 226ha)

❍ 사 업 량

- 저수지 1개소(총저수량 158.5만㎥, 유효저수량 149.4만㎥, 만수면적 14.8ha)

- 용수로 5조(L=9.82km(⌀250~1000mm)

❍ 사 업 비 : 434.72억원(‘14년 16.5억원, 국비 100%)

❍ 사업기간 : 2014. 01 ~ 2020. 12(7년간)

❍ 시행구분 : 한국농어촌공사

□ 추진사항

❍ ‘98. 09. 23(개발51322-487호) : 기본계획 수립

❍ ‘13. 08 : 세부설계 착수

❍ ‘14. 04 : 설계VA 및 문화재지표조사 완료

❍ ‘14. 07 : 사전재해영향성검토 협의 완료

❍ ‘14. 10 : 총사업비 심의위원회 협의 완료(농식품부 제3회 현장심의)

❍ ‘14. 12 : 소규모환경영향평가 협의 완료(낙동강 유역환경청 환경펑가과-6650)

□ 문제점 및 대책

❍ 기본조사가 완료(‘98년)된 지구로 부족한 농촌용수확보를 위해       사업 조기 시행

⟹ 조기 시행을 위해 농림축산식품부에 사업비 지속 지원건의

□ 향후 추진계획

❍ ‘15년 4월 : 사업 시행계획 승인 완료(경상남도)

❍ ‘15년 4월 : 공사 착공

❍ ‘15년 3월~10월 : ‘사업비 확보를 위한 지속적인 관련부서 방문

구 분	공약사업
담당부서	건설과(농업기반담당)
추진진도(%)	25%

55

상정지구 배수장 설치사업

❍ 홍수시 침수피해 지역에 배수개선시설을 설치하여 농작물 침수

방지등 재해를 사전에 예방함으로서 안전영농 도모

❍ 재해예방으로 주민생활 환경개선 및 지역소득증대 기여

□ 사업개요

❍ 기      간 : 2015. 3월 ~ 2015. 12월

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 일원

❍ 사 업 비 : 21억원

❍ 사 업 량 : 배수장 1개소, 배수문 1개소, 배수로 0.1km

(수혜면적 A=33.0ha, 유역면적 A=47.4ha)

□ 추진사항

❍ ‘14년 1월 : 2014년 본예산(군 자체예산) 250백만원 확보

❍ ‘14년 2월~6월 : 기본계획 및 실시설계 시행

❍ ‘14. 07월~9월 : 사업계획 협의 및 2015년 본예산(신규사업) 신청

❍ ‘14. 12월 : 2015년 본예산 4억원 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 소규모 배수개선 사업은 지방비(도비,군비)로 추진됨으로 사업비       확보애로 및 도비지원 토로

⟹ 조기 시행을 위해 경상남도에 사업비 지속 지원건의

□ 향후 추진계획

❍ ‘15년 1월~12월 : 사업 착공(1차분) 및 준공

❍ ‘15년 3월~10월 : ‘16년 사업비 확보를 위한 지속적인 관련부서 방문

구 분	공약사업
담당부서	건설과(방재담당)
추진진도(%)	10%

56

지리 자연재해 위험지 정비사업

❍ 상습침수 위험지를 고지배수로, 하천제방, 배수펌프장 설치로    재해로부터 지역주민의 생명과 재산을 보호.

□ 사업개요

❍ 기     간 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 일원

❍ 사 업 비 : 160억원

❍ 사 업 량 : 배수펌프장 180㎥/min, 하천정비 L=240m,

교량신설 L=36m, 고지 배수로 L=370m

□ 추진사항

❍ ‘14. 03. 11 : 실시설계 용역 계약

❍ ‘14. 04. 02 : 실시설계 용역 착수

❍ ‘14. 05. 29 : 시설물 공법심의 개최

❍ ‘14. 08. 12 : 부산지방국토관리청협의(남강,국도)

❍ ‘14. 08. 22 : 주민설명회 개최(읍사무소)

❍ ‘14. 09. 02 : 산청군의회 보고

❍ ‘14. 09. 18 : 경상남도 협의(안전총괄과)

❍ ‘14. 10. 17 : 사전설계 검토(소방방재청)

❍ ‘14. 12. 05 : 사전설계 재검토 요청(국민안전처)

❍ ‘14. 12. 24 : 주민설명회(2차)

□ 문제점 및 대책

❍ 행정절차 이행이 많아 발주시기 지연

❍ 편입부지 보상 협의애로 예상

□ 향후 추진계획

❍ 사전설계 재검토(15.01.09)

❍ 설계경제성 검토(VE)용역 시행(15.01)

❍ 경상남도 기술심의(15.02)

❍ 조달청 입찰의뢰(15.03)

❍ 사업착수(15.04)

❍ 사업준공(17.12)

구 분	공약사업
담당부서	건설과(하천담당)
추진진도(%)	0%

57

양천 봉두지구 재해위험 하천확장

❍ 양천의 미정비 구간인 봉두마을 인근 하천의 하천폭 협소로 인한     현상으로 수위가 상승하여 주택 침수와 농경지 피해가 상습적으로     발생하고 있어 하천확장을 통하여 재해예방에 만전을 기하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 도리

❍ 하 천 명 : 양천(지방하천)

❍ 사업규모 : L=1.0km

❍ 사 업 비 : 3,500백만원(국비2,100, 지방비1,400)

❍ 사업기간 : 2015. 01월 ～ 2017. 12월

□ 세부추진계획

❍ 2015년 사업비 확보를 위하여 부산지방국토관리청 및 경상남도에 건의

❍ 2015년 지방하천정비 장기계획 미반영 지구로 반영 건의

□ 문제점 및 대책

❍ MP(지방하천정비 장기계힉) 미 반영지구로 부산청 및 경남도에 반영을 위하여 지속적인 건의

□ 기대효과

❍ 농경지와 주택침수 피해를 사전에 예방하여 인명과 재산을 보호하고 주민생활 편의 제공 및 소득증대에 기여하고 함

구 분	공약사업
담당부서	건설과(도로담당)
추진진도(%)	0%

58

중산리~두류동 주차장 조성공사

(민재호 주택 뒤 선형개량)

❍ 중산리에서 두류동을 잇는 군도20호 도로 갓길에 지리산을 찾아   오는 탐방차량이 도로변에 주차를 시켜 도로 혼잡으로 인한 지역   주민들의 불편과 차량 통행 불편으로 민원이 지속적으로 발생하고  있어 도로선형 개량을 통한 주차공간 확보 검토

□ 사업개요

❍ 공사명 : 중산리~두류동 주차장 조성공사

❍ 위  치 : 산청군 시천면 중산리~두류동

❍ 사업량 : 도로선형개량L=137m, B=8.0m

❍ 사업비 : 15억원 추정(도로선형 개량 사업비)

□ 추진사항

❍ 추진 계획 없음

□ 문제점 및 대책

❍ 도로선형 개량시 지름길 도로구배가 약25%(현재도로11%)로 선형        개량 불가(군도기준 16%이내)

⇒ 기존 두류동 국립공원 운영 주차장과 중산 관광지 주차장을 이용토록      유도하고, 필요시 주차장조성공사만 별도 추진을 요함

□ 향후 추진계획

❍ 주차 질서 지도를 통한 교통 혼잡 예방

구 분	공약사업
담당부서	건설과(교통행정)
추진진도(%)	100%

59

생초 노은마을 버스운행

❍ 군내버스가 생초~어은간 7.2Km를 지방도1034호 노선을 따라 1일 4회 운행 중에 있으며,

❍ 생초~어은간 중간 경유지인 노은마을의 버스승객대기소는 마을로부터 약400m 떨어져 있음에 따라, 약 57%를 차지하고 있는 노인분들이 군내버스를 이용하는데 많은 어려움을 겪고 있음.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리~항양리 7.2Km구간

❍ 운행현황 : 생초~어은간 1일 4회 운행(오전2회, 오후2회)

□ 세부추진계획

❍ 2014.07월 : 여객운송사업자인 산청교통(주) 관계자 와 현지 확인

❍ 2014.07월 : 현지확인 사항 검토 후 운송 개선명령

❍ 2014.08월 : 버스운행

□ 문제점 및 대책

❍ 어서리~항양리 7.2Km구간에 위치한 4개리 중 어서리를 제외한 3개리 6개 마을에서도 노은 마을과 같이 마을 앞까지 군내 버스가 들어갈 수 있도록 운송업체와 협의 중.

□ 기대효과

❍ 지방도1034호 노선을 따라 운행 중인 생초~어은간 군내 버스가 노은마을까지 약 400m를 차량운행 함으로써 노인분들이 편안하게 군내버스를 이용할 수 있음.

구 분	공약사업(추가)
담당부서	건설과(교통행정)
추진진도(%)	10%

60

덕산버스정류장 재정비 사업

❍ 노후화 되고 교통사고 위험성이 산재되어 있는 덕산버스정류장을 재정비  하여 지리산을 찾는 방문객에게 관광 산청의 이미지 제고

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 923-9번지(예정)

❍ 사 업 량 : 1,000㎡ (대합실 건축 100 , 주차장 900)

❍ 시설기간 : 2015 ~ 2016 (2년)

❍ 사 업 비 : 2,000백만원

□ 세부추진계획

❍ 2015년 사업비 예산확보 : 2014년 11월

❍ 사업타당성 조사 용역 : 2015년 1월 ~

❍ 덕산버스정류장 정비방안 실시계획수립 용역 : 2014년 2월

❍ 주민설명회 개최 : 2015년 3월 ~

❍ 사업 추진 : 2015년 4월 ~

□ 문제점 및 대책

❍ 덕산버스 정류장 정비 사업 관련 정류장 위치 및 사업 규모 확정을      위한 주민 의견 수렴 필요.

❍ 사업타당성 조사 용역 조기 실시

□ 기대효과

❍ 현대화된 버스정류장 조성으로 교통 편의 제공

❍ 지리산을 찾는 관광객에게 관광 산청의 이미지 제고

구 분	공약사업
담당부서	건설과(건설행정담당)
추진진도(%)	30%

61

점남마을 다목적광장 조성공사

❍ 차황면 실매리 점남마을 주민들이 공동으로 활용할 수 있는 공간   부족하여 주민들의 불편이 가중되고 있어 주민들의 편의를 제공할  수 있는 다목적광장을 조성하여 주민숙원을 해소코자 함.

□ 사업개요

❍ 기     간 : 2015. 1월 ~ 2016. 12월

❍ 위    치 : 산청군 차황면 실매리 점남마을 일원

❍ 사 업 비 : 150백만원

❍ 사 업 량 : 다목적광장조성 1식(A=2,000㎡)

□ 추진사항

❍ 2014년. 10월 ~ 12월 : 사업예산확보

❍ 2015년. 01월 ~ 02월 : 실시설계용역시행

❍ 2015년. 03월 ~ 12월 : 편입부지 보상협의

❍ 2016년. 01월 ~ 12월 : 사업착공 및 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 마을주민들의 의견수렴 등의 절차를 거쳐 부지선정 후 예산확보       등 사업추진 절차 이행.

□ 향후 추진계획

❍ 편입토지소유자와의 보상협의

❍ 협의완료시 사업 착공