상하수도사업소 소관

민선6기 군수공약사업, 주요시책사업

주요업무 추진상황 보고 자료

2014년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도사업소)

□ 총    평

❍ 생비량면의 갈수기 원수 부족, 악화된 수질 등 근본적인 생활용수 애로 해결을 위한 지방상수도 인입공사 시작은 지역간 불균형을 줄이고 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급으로 주민복지 증진 기대

❍ 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 추진상황

구 분	추 진 실 적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	6	2	4	-	-
군수공약사업	5	2	3	-	-
주요시책사업	1	-	1	-	-

□ 주요성과

❍ 지방상수도 인입공사(용역), 노후관 교체공사, 급수관로 누수탐사       등을 통해 지방 및 마을 상수도의 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급        으로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

❍ 도리지구 공공하수 처리시설 확대 및 생활 오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 반    성

❍ 산청˙생초 지방상수도 통합 및 확장공사 원도급사 법정관리에          따른 사업추진 지연으로 당초계획에는 미치지 못하나 공사 정상화와        체불임금 해소를 위해 다각적으로 최선의 노력을 다하고 있음

□ 향후 추진계획

❍ 미확보 또는 부족분 재원 확보를 위해 도 또는 중앙부처와 유대강화

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(수도시설담당)
추진진도(%)	53%

81

산청-생초 지방상수도 통합 및 확장공사

❍ 한정된 수자원의 효율적 이용 및 지역간 수급 불균형을 해소하고 안정적인 정수 수질 확보와 장래 수요량 변동에 따른 능동적 대처로 지역  주민들에게 깨끗한 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사업기간 : 2010년 12월 ~ 2016년 12월

❍ 사 업 비 : 29,717백만원(국비 16,824백만원, 군비 12,893백만원)

❍ 사 업 량 : 송․배수관로 L=24.7km, 취․정수시설 5,500톤/일, 건축 및 전기 등

❍ 시공업체 : 연대보증시공회사 일산종합건설(주)

□ 추진사항

❍ ‘14. 06. 25 : 3차분 6회 기성검사

❍ ‘14. 07. 01 : 법정관리인(대표자) 사직서 제출

❍ ‘14. 07. 10 ~ 07. 16 : 현장정상화 추진 촉구(3차)

❍ ‘14. 07. 22 : 건축공사 중지 승인

❍ ‘14. 07. 30 ~ 08. 02 : 현장복귀 계약이행 최종 통보(2차)

❍ ‘14. 09. 11 : 원도급사 파산선고 및 폐지결정

❍ ‘14. 11. 19 : 연대보증회사 수정공정표 제출

❍ ‘14. 12. 01 : 연대보증회사 수정공정표 승인

❍ ‘14. 12. 03 : 기성금 지급관련 설명회 개최

❍ ‘14. 12. 10 : 3차분, 4차분 변경 계약 체결

❍ ‘14. 12. 15 : 동절기 공사 중단(전제분, 3차분, 4차분)

□ 문제점 및 대책

❍ 원도급사 파산에 따른 체불금 및 공사중단

❍ 3차분 준공예정년월일 이후 파산에 따른 공사기간 부족

❍ 부진공정 만회를 위해 연대보증시공회사에 공사기간 연장 정상화 추진

□ 향후 추진계획

❍ ‘14. 12 : 3차분 6회 기성금 지급 및 미지급분 공탁계획

❍ ‘15. 02 : 3, 4차분 공사 발주 및 착수계획

❍ ‘15. 07 : 잔여공사 발주계획

❍ ‘16. 12 : 전체공사 준공계획

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	10%

82

오전지구 공공하수처리시설 설치사업

❍ 농촌 지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 지역

사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사업기간 : 2014년 12월 ~ 2017년 12월

❍ 사 업 비 : 5,000백만원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 90톤/일, 하수관로 L=6.46km, 배수설비 203가구

□ 추진사항

❍ ‘14. 12. 05 : 하수도정비 기본계획 부분변경 수립용역 착수

❍ ‘14. 12. 11 : 실시설계용역 착수

□ 문제점 및 대책

❍ 2011년 기 수립된 오전하수처리구역이 5개마을(오전, 신기, 내평, 중촌,       왕촌)로 인근 3개마을(신촌, 오휴, 대현)이 제외되어 있음.

❍ 하수처리구역을 확대.지정코자 하수도정비 기본계획 부분 변경수립       용역 중.

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 02월 : 하수도정비 기본계획변경 승인

❍ ‘15. 03월 : 16년 환경부 국고보조사업 신청

❍ ‘15. 04월 : 하수처리시설 공법 선정

❍ ‘15. 07월 : 실시설계용역 완료

❍ ‘15. 10월 : 설치인가

❍ ‘16. 01월 : 공사 착공

❍ ‘17. 12월 : 공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(수도시설담당)
추진진도(%)	20%

83

생비량지구 지방상수도 인입공사

❍ 생비량면의 수질악화 및 원수부족 등의 근본적인 문제를 해결하기  위해 지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사업기간 : 2014년 1월 ~ 2017년 12월

❍ 사 업 비 : 8,180백만원(국비 5,726백만원, 군비 2,454백만원)

❍ 사 업 량 : 단성정수장 증설 1식, 관로매설 L=41.8km, 배수지설치 등

❍ 용역업체 : ㈜도화엔지니어링 외 3개사

□ 추진사항

❍ ‘08. 10 : 산청군 수도정비 기본계획 반영

❍ ‘12. 02 : 18인 마을대표 지방상수도 조기 인입 건의

❍ ‘13. 06 : 추경 500백만원 확보 및 경상남도 투․융자 심사 완료

❍ ‘13. 10 : 기획재정부 승인 및 관련용역 PQ 기술심의 완료

❍ ‘13. 12 : 용역업자 선정 및 1차분 용역 발주

❍ ‘14. 04 : 2차분 용역 발주

❍ ‘14. 04 : 용역발주 주민설명회 개최

❍ ‘14. 11 : 수도정비기본계획(변경) 보고서 제출 및 업무협의

❍ ‘14. 12 : 1회 기성분 준공검사

□ 문제점 및 대책

❍ 본 사업을 통해 지선관로까지 사업 시행할 계획으로 환경부(국비)        재원 확보가 필요함

❍ 사업의 당위성 등을 환경부에 설명하여 재원확보에 만전을 기함

□ 향후 추진계획

❍ ‘15. 05 : 2차 용역 준공계획

❍ ‘15. 05 : 공사 발주 및 착수계획

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	100%

84

도리마을 공공하수설치사업 확대

❍ 도리지구 공공하수처리시설 설치사업과 병행하여 도리지구 소재지와

인접한 원도동마을 하수처리구역까지 하수관거를 확대 설치하여 하수도

보급율 증대와 지역발전균형에 기여코자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 도리 일원

❍ 사업기간 : 2014년 3월 ~ 2014년 10월

❍ 사 업 비 : 400백만원

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=1.2km, 배수설비 29가구

□ 추진사항

❍ ‘14. 03. 17 : 실시설계용역 착수

❍ ‘14. 05. 19 : 실시설계용역 완료

❍ ‘14. 06. 25 : 공사 착수

❍ ‘14. 10. 22 : 공사 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(수도시설담당)
추진진도(%)	20%

85

사계마을 상수도 노후관 교체공사

❍ 신등면 양전리 사계마을의 기존 관로 노후화로 잦은 누수 및 파손으로 상수도 이용에 어려움이 있어 상수도 노후관 교체로 지역 주민들에게 안정적이고 깨끗한 식수 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신등면 양전리 사계마을

❍ 사업기간 : 2014년 12월 ~ 2015년 7월

❍ 사 업 비 : 80백만원(군비 80백만원)

❍ 사 업 량 : 관로교체 L=740m, 부대공 1식

□ 추진사항

❍ ‘14. 07 : 노후관로 현장 조사

❍ ‘14. 10 : 실시설계 용역 발주

❍ ‘14. 12 : 공사발주 및 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 기존상수도 관로의 잦은 누수로 인해 단수 및 주민불편사항 가중

❍ 전 구간 상수도 노후관 교체 및 감압밸브설치로 지역주민들의

안정적이고 깨끗한 식수 공급

□ 향후 추진계획

❍ ‘14. 12 : 공사 착수계획

❍ ‘15. 06 : 공사 준공계획

구 분	시책사업
담당부서	상하수도사업소(수도시설담당)
추진진도(%)	100%

86

마을상수도 개․보수 및 유지(긴급)보수사업

❍ 노후화된 마을상수도 관로 및 물탱크 제거사업과 배수지의 안전휀스 설치사업을 통하여 마을상수도를 이용하는 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 식수 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 외 10개면

❍ 사업기간 : 2014년 1월 ~ 2014년 12월

❍ 사 업 비 : 1,100백만원(군비 1,100백만원)

❍ 사 업 량 : 마을상수도 개․보수 및 유지 보수, 시설물 안전휀스 설치 등

□ 추진사항

❍ ‘13. 10 ~ 12 : 읍면 사업신청 및 현장 일제조사

❍ ‘14. 01 : 사업 실시설계 및 읍면 예산 재배정

❍ ‘14. 03 : 공사착공

❍ ‘14. 06 : 개․보수사업 준공

❍ ‘14. 03 ~ 12 : 긴급 유지 보수완료

□ 문제점 및 대책

❍ 마을상수도 시설의 특성상 관로 노후화, 파손 등으로 계속적인

개․보수 및 유지보수가 요구됨.

❍ 향후 마을상수도 파손 및 기능 저하시 복구를 위한 필요예산

확보 운영