2013년도 성과 및 반성

1. 주요성과

□ 소규모 주민숙원사업 및 수해복구사업 완료

◦ 대 상 지 : 산청읍외 10개면

◦ 사업량

(단위:건,백만원)

구 분	사업량	사업비	비고
계	153	8,305
소규모지역개발사업	41	1,100
소규모주민숙원 (군시행)	14	924
읍면주민숙원사업	33	1,100
수해복구사업	65	5,181

□ 엑스포진입도로선형개량사업 완료

◦ 위    치 : 산청군 금서면 특리 ～ 매촌리 일원

◦ 사 업 비 : 116.5억원(국비:9.5억, 도비:87억, 군비:20억)

◦ 사 업 량 : L=2.47km, B=12.5m(3차로)

◦ 사업기간 : 2011. 11. ~ 2013. 09.

□ 삼장～산청국도건설공사(국도59호 밭머리재터널)

◦ 구  간 : 경남 산청군 삼장면 상촌리～경남 산청군 금서면 평촌리                   (국도59호선)

◦ 사업량 : L=11.80km, B=11.5m(2차로), V=60km/h(국도Ⅳ등급)

◦ 사업기간 : 2011. 12. 19 ~ 2018. 12(예정)

◦ 사 업 비 : 844억원정도

◦ 향후추진계획

∙ 2014. 2월 : 보상협의 추진

∙ 2015. 2월 : 공사 착공

□ 국도20호선 신안～생비량간국도건설공사

◦ 구    간 : 단성면 강누리 ～ 생비량면 도리구간

◦ 연    장 : L=9.2km, B=19.5m(4차로)

◦ 총사업비 : 1,090억원

◦ 추진현황

∙ 2014.  5월 : 실시설계 준공 예정

◦ 향후추진계획

∙ 2015. 2월 : 보상협의 추진

∙ 2016. 2월 : 공사 착공

□ 국도20호선 단성～시천간 국도건설공사

◦ 구    간 : 시천면 천평리 ～ 단성면 남사리구간

◦ 연    장 : L=10.6km B=20.0m(4차로)

◦ 추정사업비 : 1,210억원(공사비: 1,044억원, 보상비: 166억원)

∙ 2011.  6월 : 기본설계완료

∙ 2014년  : 실시설계 반영토록 지속 건의

□ 덕천강 고향의 강 조성사업

◦ 위    치 : 시천면 사리～ 삼장면 대포리

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km(자전거도로, 하천환경정비 등)

◦ 사 업 비 : 27,058백만원(국비 16,235 도비 3,247 군비 7,576)

◦ 사업기간 : 2011. 10 ～ 2017. 12.

◦ 추진현황

∙ 2013. 07월 : 환경영향평가 협의완료

∙ 2013. 08월 : 총사업비 조정협의 완료

∙ 2013. 09월 : 보상계획 공고

∙ 2013. 10월 : 경남도 건설기술심의

◦ 향후추진계획

∙ 2014. 1월 : 보상협의 및 착공

∙ 2017. 12월 : 공사준공

□ 양천 생태하천 조성사업

◦ 위    치 : 신안면 하정리

◦ 사 업 명 : 양천생태하천조성사업

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=2.7km

◦ 총사업비 : 6,676백만원(국비 4,030 도비 1,094 군비 1,552)

◦ 추진현황

∙ 2013. 12월 : 3차분 양천생태하천 조성사업 준공

◦ 향후추진계획

∙ 2014. 1월 : 4차분(최종) 공사착공

∙ 2014. 12월 : 4차분(최종) 공사준공

□ 지방하천 하도준설사업

◦ 위    치 : 시천면 신천리 외 2개소(시천천,단계천,덕천강)

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=1,470m

◦ 사 업 비 : 5,680백만원(국비 3,408 군비 2,272)

◦ 사업기간 : 2013. 2월 ～ 12월

◦ 추진현황 :  시천천,덕천강 하도준설사업 공사준공

□ 풍수해저감 종합계획 수립 용역사업

◦ 위    치 : 산청군일원

◦ 사 업 량 : 산청군풍수해저감종합계획 수립(A=794.69㎢)용역 1식      ◦ 사 업 비 : 807백만원(2012년 660백만원, 2013년 147백만원)

◦ 용역기간 : 2012. 9 ~ 2013. 12

◦ 추진현황

∙ 2012. 6월 ～ 9월 : 용역 계약 의뢰 및 선정

∙ 2013. 8월 : 풍수해위험지구 조사 및 저감대책 수립

∙ 2013. 12월 : 행정절차 이행 및 소방방재청 승인

2. 반성 및 개선

□ 소규모주민숙원사업 예산부족등으로 주민신뢰도 저하

◦ 충분한 예산을 확보하여 주민숙원 해결

□ 국.공유재산 지적정리등 민원발생 소극적 대처

◦ 지속적인 주민설득으로 기부채납등으로 적극 정리 추진