2012년도 성과 및 반성

1. 주요성과

□ 소규모 지역개발사업

◦ 대 상 지 : 산청읍외 10개면

◦ 사업개요

(단위:건,백만원)

구 분	사업량	사업비	비고
계	171	6,622
재정건의사업	9	1,120	도비 50%
소규모 지역개발사업	128	2,471
수해복구사업	34	3,031

◦ 추진현황(미완공 사업)

∙ 외송소교량 설치공사(2012. 10월 착공) : 절대공기 부족

∙ 내평농로포장공사(2012. 10월 착공) : 민원 발생으로 착공 지연

□ 국가지원지방도60호선 선형개량공사

◦ 위    치 : 산청군 금서면 특리 ～ 매촌리 일원

◦ 사 업 비 : 202억원(국비:103.5억, 도비:93.5억, 군비:5억)

◦ 사 업 량 : L=5.4km, B=12.5m(3차로)

◦ 사업기간 : 2009. 03. ~ 2012. 12(4년간)

◦ 추진현황

∙ 2010. 5. 24 : 공사 착공

∙ 2011. 5월: 공사구간 (L=1.80km) 경상남도진주지소 실시설계용역완료

∙ 2011.9.23 : 계약심사완료

∙ 2012. 7월 : 공사구간(L=1.70km) 준공 및 공사구간(L=1.80km)         구조물 일부 시공완료 및 산마루측구 시공중(공정율: 50%)

□ 삼장～산청국도건설공사(국도59호 밭머리재터널) 실시       설계 용역

◦ 구  간 : 경남 산청군 삼장면 상촌리~경남 산청군 금서면 평촌리                   (국도59호선)

◦ 사업량 : L=5.84km, B=11.5m(2차로), V=60km/h(국도Ⅳ등급)

◦ 사업기간 :2011. 12. 19 ~ 2012. 12. 12(12개월)

◦ 사 업 비 : 19억원(총사업비 938억원)

◦ 추진현황

∙ 2012. 06월 : 주민설명회 개최

∙ 2012. 10월 : 사전재해영향성검토 및 설계자문회의(마무리단계)

∙ 2012. 12월 :  인허가서류 협의 및 준공

□ 국도20호선 신안～생비량간국도건설공사

◦ 구    간 : 단성면 강누리 ～ 생비량면 도리구간

◦ 연    장 : L=9.3km, B=20.0m(4차로)

◦ 기본설계 용역비 : 4,715백만원(1공구 L=5.5km : 2,394백만원

2공구 L=3.8km : 2,321백만원)

◦ 추진현황

∙ 2011. 6.30 : 예비타당성조사 완료

∙ 2012.  8월 : 주민설명회 개최

∙ 2013. 12월 :기본 및 실시설계용역사업 준공 예정

□ 국도20호선 단성～시천간 국도건설공사

◦ 구    간 : 시천면 천평리 ～ 단성면 남사리구간

◦ 연    장 : L=9.36km, B=20.0m(4차로)

◦ 추정사업비 : 1,289억원(공사비: 1,123억원, 보상비: 166억원)

∙ 2009.  1. 8 : 기본설계 계획 노선에 대한 주민설명회 개최

∙ 2010.  7. 9 : 사전환경성검토서(초안)에 대한 주민설명회 개최

∙ 2012. 10월 현재 : 기본설계완료후 2013년 실시설계용역비 반영 예정

□ 덕천강 고향의 강 조성사업

◦ 위    치 : 시천면 사리～ 삼장면 대포리

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km(자전거도로, 하천환경정비 등)

◦ 사 업 비 : 27,058백만원(국비 16,235 도비 3,247 군비 7,576)

◦ 사업기간 : 2013 ～ 2015. 12.

◦ 추진현황

∙ 2012. 9월 : 실시설계 용역 완료

∙ 2012. 10월 ～ 2013. 12월 : 관계기관 협의 및 보상 추진

□ 양천 생태하천 조성사업

◦ 위    치 : 신안면 하정리

◦ 사 업 명 : 양천생태하천조성사업

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=2.7km

◦ 총사업비 : 6,600백만원

◦ 추진현황 : 실시설계용역 완료

사전환경성검토 및 계약심사의뢰 추진중

□ 지방하천 하도준설사업

◦ 위    치 : 신안면 갈전리 외 3개소(갈전천,단계천,시천천,덕천강)

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=420m

◦ 사 업 비 : 3,466백만원

◦ 사업기간 : 2012. 2월 ～ 12월

◦ 사업성과 : 친수공간 조성 등 하천의 보존과 효율적인 관리

□ 소하천 정비사업 추진

◦ 위    치 : 산청읍 내수리 내수풋가실천 외 3개소

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=1.8km

◦ 사 업 비 : 1,254백만원

◦ 사업기간 : 2012. 2월 ～ 10월

◦ 사업성과 : 하상바닥보강을 통한 세굴방지 등 수해피해 예방

□ 풍수해저감 종합계획 수립 용역사업

◦ 위    치 : 산청군일원

◦ 사 업 량 : 산청군풍수해저감종합계획 수립(A=794.69㎢)용역 1식      ◦ 사 업 비 : 953백만원(2012년 660백만원, 2013년 293백만원)

◦ 용역기간 : 2012. 9 ~ 2013. 9(1년간)

◦ 추진현황

∙ 2012. 06 ～ 9월 : 용역 계약 의뢰 및 선정

∙ 2012. 09월 : 사업 착공

□ 산청버스정류소 확충사업

◦ 위    치 : 산청읍 산청리 27-1번지 일원

◦ 사 업 비 : 20억원(도비 10억, 군비 10억)

◦ 사 업 량 :

∙부지 및 지장물건 매입 : 5건, 10억원

∙종합터미널 및 택시승강장 건립 등 : 10억원

◦ 사업기간 : 2011년～ 2012년

◦ 추진현황

∙ 2012. 5월 : 편입물건 보상 완료(5건, 682㎡, 10억원)

∙ 추가 사업비(도비)  10억원 지원 건의 및 확보

2. 반성 및 개선

□ 보상협의 지연 등으로 재정조기집행 애로

◦ 사업에 대한 다수의 이해보다는 개인이기주의 팽배

◦ 주민의 요구사항은 증대되고 있으나 가용 예산 부족

◦ 대    책

∙ 장기적인 사업 계획으로 이해관계가 원만한 지역 우선 검토

∙ 사업선정 단계부터 철저한 현장조사로 사업의 타당성과 부지

매입 가능성, 문제점 여부, 주민의견 등을 면밀히 검토한 후 사업추진