2011년도 성과 및 반성

1. 주요성과

□ 소규모지역개발사업 추진

◦ 대 상 지 : 산청읍외 10개면

◦ 사 업 비 : 5,898백만원(도비 1,680백만원, 군비 4,218백만원)

◦ 사업개요

(단위:건,백만원)

구 분	사업량	사업비	비고
계	140	5,898
재정건의사업	9	1,680
소규모주민숙원사업	131	4,218

◦ 그간 추진사항

∙ 2010. 12 : 소규모지역개발사업 대상지 확정

∙ 2010. 12  ～ 2011. 01. 15 : 합동설계 시행

∙ 2011. 02 : 공사 착공

∙ 2011. 10 : 공사 준공

◦ 사업성과

∙재정조기집행으로 지역경제 활성화 도모

∙농촌지역 생활환경 개선과 생산기반시설 확충으로 소득증대 도모

∙오랜 주민숙원사업 해소로 정주여건 고취

□ 국가지원지방도60호선 선형개량공사 추진

◦ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 ～ 특리지내

◦ 사 업 비 : 총43억(산청군: 33억, 경상남도: 10억)

◦ 사 업 량 : 도로선형개량  L=1.70km, B =11.0m(9.5m)

(산청군 L=1.22km, 경상남도: L=0.48km)

◦ 사업기간 : 2010. 05. 28 ～ 2012. 05. 26

◦ 사업비 집행계획

구 분	사 업 비 (백만원)			비고
	계	산청군 시행	경상남도 시행
총 사업비	4,300	3,300	1,000
도급예정액	2,230	1,724	506
관급자재대	1,103	915	188
폐기물처리	30	22	8
용지보상비	937	639	298

◦ 그간 추진상황

∙ 2010. 1. 20 : 실시설계 용역 현장 착수

∙ 2010. 2. 23 : 도로선형 결정을 위한 주민설명회 개최

∙ 2010. 4.19~6.17 : 사전환경성 및 사전재해영향성검토 용역 완료

∙ 2010. 4. 20 : 계약심사 의뢰

∙ 2010. 4. 26 : 계약심사 완료

∙ 2010. 5. 24 : 사업자 선정[양산시 소재 : 신야종합건설(주)]

∙ 2010. 5. 28 : 계약 및 착공

∙ 2010. 7월     : 편입부지 보상협의 추진완료

∙ 2010.8～9월 : 문화재지표조사 착수 및 완료(경남발전연구원)

∙ 2010. 10월 : 문화재지표조사 발굴(시굴)조사 완료 (경남발전연구원)

∙2011. 10월현재 :  공사 추진중(공정율: 60%)

□ 국도20호선 단성～시천간국도건설공사 추진

◦ 구    간 : 시천면 천평리 ～ 단성면 남사리구간

◦ 연    장 : L=9.36km, B=20.0m(4차로)

◦ 추정사업비 : 1,289억원(공사비: 1,123억원, 보상비: 166억원)

∙ 예비타당성조사 완료 , 기본설계 용역중(12억9천만원)

∙ 2009. 1. 8 : 계획노선에 대한 주민설명회 개최

∙ 2010. 7. 9 : 사전환경성검토서(초안)에 대한 주민설명회 개최

∙ 2011. 10월현재 : 기본설계완료후 2012년 실시설계용역비 반영 예정

□ 삼장～산청국도건설공사(국도59호 밭머리재터널) 추진

◦ 구    간 : 삼장면 홍계리 ～ 금서면 평촌리

◦ 연    장 : L=5.8km

◦ 실시설계 용역비 : 2,259백만원

◦ 추진사항

∙ 2011.10월 현재 : 실시설계용역사업 참가할 용역회사 선정을         위한 공고중(부산지방국도관리청)

□ 국도20호선 신안～생비량간국도건설공사 추진

◦ 구    간 : 단성면 강누리 ～ 생비량면 도리구간

◦ 연    장 : L=9.3km, B=20.0m(4차로)

◦ 기본설계 용역비 : 4,715백만원(1공구 L=5.5km : 2,394백만원

2공구 L=3.8km : 2,321백만원)

◦ 추진사항

∙ 2011. 6.30 : 예비타당성조사 완료

∙ 2011.10월 현재 : 기본 및 실시설계용역사업 집행계획 및 입찰       에 참가할 용역회사 선정을 위한 평가자료 제출 공고중(부산지       방국토관리청)

□ 2011년 소하천 정비사업 추진

◦ 위    치 : 산청읍 내수리 외 4개소

◦ 대 상 지 : 내수풋가실천, 창안천, 이교천, 제보뒷골천, 묵하천,

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=2.1km

◦ 사 업 비 : 2,996백만원

◦ 사업기간 : 2011. 1월 ～ 10월

◦ 사업성과

∙ 예산조기 집행으로 우수기전 사업완료

∙ 하천 호안정비로 수해피해 예방

∙ 하상바닥보강을 통한 세굴방지 등 수해피해 예방

∙ 하천 선형개량 및 하폭확보를 통한 수해피해 예방

∙ 친환경 하천 조성

□ 2011년 지방하천 하도준설사업 추진

◦ 위    치 : 신안면 갈전리 외 2개소(갈전천,단계천,시천천)

◦ 주요사업

∙ 단계천(율현지구) 하도준설사업

∙ 갈전천 하도준설사업

∙ 시천천 하도준설사업 보상업무 추진

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=420m

◦ 사 업 비 : 1,417백만원

◦ 사업기간 : 2011. 1월 ～ 12월

◦ 사업성과

∙ 예산조기 집행으로 우수기전 사업완료

∙ 하천 통수단면 확보를 통한 수해피해 예방

∙ 퇴적토사 재활용을 통한 예산절감 기여

∙ 하천의 보존과 효율적인 관리

∙ 하천 주변 친수공간 조성

□ 2011년 퇴적물 제거사업 추진

◦ 위    치 : 신안면 신기리 외 6개소(양천, 상법천, 미곡천)

◦ 주요사업

∙ 양천(신기지구, 한빈지구, 도전지구) 퇴적물 제거사업

∙ 상법천(청산지구) 퇴적물 제거사업

∙ 미곡천(사대지구) 퇴적물 제거사업

◦ 사 업 량 : 퇴적물 제거 75,000㎥

◦ 사 업 비 : 497백만원

◦ 사업비교부 : 산청읍외 4개면(100백만원)

◦ 사업기간 : 2011. 1월 ～ 12월

◦ 사업성과

∙ 하천 통수단면 확보를 통한 수해피해 예방

∙ 하천 퇴적오염토사 제거를 통한 하천환경 정화 기여

∙ 퇴적토사 보조기층 및 성토재료 활용을 통한 예산절감 기여

∙ 하천 주변 친수공간 조성

□ 양천생태하천조성사업 추진

◦ 위    치 : 신안면 하정리

◦ 사 업 명 : 양천생태하천조성사업

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=2.7km

◦ 총사업비 : 6,600백만원

◦ 추진현황 : 실시설계용역 완료

사전환경성검토 및 계약심사의뢰 추진중

□ 덕천강 고향의 강 조성사업 추진

◦ 위    치 : 시천면 사리～ 삼장면 대포리

◦ 사 업 명 : 덕천강 고향의 강 조성사업

◦ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km

◦ 총사업비 : 27,058백만원

◦ 추진현황 : 실시설계 용역발주 진행중

□ 자동음성통보시스템 설치사업 추진

◦ 위    치 : 산청군 관내 일원

◦ 사 업 량 : 자동음성통보시스템 35식

◦ 사 업 비 : 200백만원

◦ 사업기간 : 2011. 1월 ～ 6월

◦ 사업성과

∙ 예산조기 집행으로 우수기전 사업완료

∙ 여름철 물놀이안전사고 예방홍보 및 자연재난 홍보

∙ 산청 군정관련 각종사항 안내 및 홍보

◦ 추진상황

∙ 2011. 1월~ : 자동음성통보시스템 사업대상지 조사․선정

∙ 2011. 3월   : 자동음성통보시스템 제작설치 계약

∙ 2011.  6. 25 : 자동음성통보시스템 제작설치 완료

□ 원지버스정류소 정비사업

◦ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 지내

◦ 사 업 량 : 원지버스정류소 설치 1식

◦ 사 업 비 : 537백만원

◦ 사업기간 : 2011. 1월 ～ 6월

◦ 사업성과

∙ 버스정류소 기반시설 확충으로 승객 편의 제공

∙ 지리산 관문인 원지정류장 및 주변 환경정비로 관광 산청 이미지 제고

◦ 추진상황

∙ 2011. 1월 : 부지 매입

∙ 2011. 1~2월 : 실시설계 용역 및 행정절차 이행 완료

∙ 2011. 2~ 6월 :  착공 및 준공

2. 반성 및 개선

□ 보상협의 지연 등으로 재정조기집행 및 공사 추진 애로

◦ 현    황

∙ 사업에 대한 다수의 이해보다는 개인이기주의 팽배

∙ 주민의 요구사항은 증대되고 있으나 가용 예산 부족

◦ 대    책

∙ 장기적인 사업 계획으로 이해관계가 원만한 지역 우선 검토

∙ 사업선정 단계부터 철저한 현장조사로 사업의 타당성과 부지

매입 가능성, 문제점 여부, 주민의견 등을 면밀히 검토한 후 사업추진