안전건설과 소관

2017년도 주요업무계획

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	8

Ⅳ. 2017년 주요업무계획	10

Ⅴ. 주요 현안사업	20

Ⅵ. 신규(특수) 시책	36

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위 : 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
23		1	7	8	3	4

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
건설행정담당 (6명)	◦소규모 주민숙원사업 및 지역개발사업 ◦각종 건설사업장 편입물건 보상 및 등기 ◦전문건설업 및 골재 채취업 등록․관리 ◦국토교통부 소관 국유재산관리
안전관리담당 (3명)	◦안전 및 인적·사회적 재난관리 ◦안전관리기본계획수립 및 안전한국훈련 실시 ◦여름철 물놀이 관리
도로담당 (4명)	◦군도,농어촌 도로사업 시행 및 관리 ◦교량 및 도로 유지 보수관리 ◦노상적치물 및 과적차량 단속
하천담당 (3명)	◦하천관련사업 시행 및 관리 ◦국가하천, 지방하천, 소하천 유지관리 ◦하천점용 및 폐천부지 관리
농업기반담당 (3명)	◦농촌용수개발사업 및 배수개선사업 ◦경지정리 및 밭기반정비사업 ◦수리시설 개보수 및 유지관리
자연재난담당 (4명)	◦자연재난종합상황실 운영 및 관리 ◦재해위험지구 및 재해취약시설 점검 관리 ◦자연재난 조사 및 복구계획 수립 등 상황 종합관리

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

소규모 주민숙원사업 추진으로 주민편익 증대

❍ 사업실적

(단위 :  백만원)

구 분	총 사업실적		군 시행		읍․면 시행		비고
	건	사업비	건	사업비	건	사업비
합 계	140	7,302	23	3,740	117	3,562
마을진입도로 정비	55	3,182	12	1,810	43	1,372
농로 정비	58	1,778	1	50	57	1,728
세천 정비	14	677	3	350	11	327
다목적광장 조성	7	1,320	6	1,280	1	40
기 타	6	345	1	250	5	95

공익사업의 효율적인 수행을 위한 토지 등 협의

❍ 손실보상 협의

- 부동산(토지, 건물) 보상 : 510필지 176,382.8㎡, 6,100백만원

- 지장물 등 영농손실 보상 : 350건 1,600백만원

❍ 토지보상협의회 2회 개최

- 삼장∼산청 간 국도건설공사, 남강산청지구 하천환경정비사업

재난대응 안전한국훈련 실시로 재난상황에 대한 신속한 대응체계 마련

❍ 훈련기간 : 2016. 5. 16 ~ 5. 20

❍ 훈련유형 : 실행기반 기능훈련 및 토론 기반형 훈련 실시

❍ 주요내용

- 공무원 비상소집 및 민방위 훈련 실시

- 재난대응토론 및 실제훈련(덕산문화의 집 화재복구)실시

- 소소심 안전교육 및 안전문화캠페인과 불시 메시지 훈련

국가안전대진단 및 시설물 안전점검 실시로 재해와 재난예방

❍ 국가안전대진단 실시 : 36개 분야 639개소(공공 339, 민간 300)

❍ 특정관리대상시설 안전점검 및 안전조치 실시 : 연2회/138개소

❍ 다중이용시설, 재난취약시설 등 안전점검 : 12회

❍ 어린이 놀이시설 안전관리 및 지도점검 : 4회

❍ 각종 공연∙축제장 사전 합동안전점검 : 4회

❍ 물놀이 관리지역 및 위험지역 점검 및 관리 : 37개소

심폐소생술 및 자동제세동기 교육 실시로 위급상황 대처능력 배양

❍ 기 간 : 2016. 7. 25 ~ 7. 29

❍ 대 상 : 산청군 전 공무원

❍ 내 용 : 심폐소생술(자동제세동기) 체험교육을 통한 재난대응 능력 배양

※ 자동제세동기 보급 : 15개(군청, 전읍·면, 생초, 산청, 원지 버스터미널)

도로(군·농어촌)확포장사업으로 군민의 공공복리 향상 기여

❍ 사업현황

(단위:건, km,백만원)

구 분	총 사업계획			2015년 까지		2016년 시행		향후 소요액
	지구	연장	사업비	지구	사업비	지구	사업비
계	29	42.4	49,650	6	15,407	5	9,642	24,601
농어촌 도로	18	22	30,799	2	5,212	2	6,447	19,140
군도	11	20.4	18,851	4	10,195	3	3,195	5,461

※ 총 사업계획은 계속사업으로 추진 중이거나 공약 및 현안사업 등 향후 시행이

계획된 사업의 전체 현황임

하천정비 및 유지관리사업으로 재해예방 및 하천환경개선

구 분	총사업비 (단위:백만원)	하천 시설정비		하천유지관리		비 고
		건	사 업 비 (단위:백만원)	건	사 업 비 (단위:백만원)
계	8,441	11	6,344	68	2,097
국가하천(갈전제)	400	1건	105	2	38	안전점검 용역
				5	257	유수지장목제거 및 제방풀베기
지방하천 (고향의강조성사업 외)	4,534	4건	3,732	52	502	하천퇴적물제거사업
				8	300	유수지장목제거사업
소 하 천 (제보뒷골 소하천 외)	3,507	6건	2,507	1	1,000	소하천정비종합계획 재수립용역

농업기반정비 사업 시행으로 농촌 지역발전 이바지

❍ 관광객 및 주민편익을 위한 황매산 입구 편의시설 확충

- 위    치 : 산청군 차황면 상법리, 신등면 장천리, 율현리

- 사 업 량 : 수변공원, 정자, 파고라, 등 각1개소, 주차장 1,700㎡

- 사 업 비 : 1,370백만원(국비 100%)

❍ 금서면 농촌생활환경 정비

- 사 업 비 : 3,000백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

- 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2016년 12월

- 사업내용 : 도로, 상수도, 소공원, 주차장 조성 및 재해위험해소 등

❍ 단성면 백곡지구 소규모 용수개발사업 완공

- 사 업 량 : 양수장 1식, 송수관로 3.3km, 용·배수로 0.4km

- 사 업 비 : 2,145백만원(국비 70%, 도비 9%, 군비 21%)

- 사업기간 : 2011년 1월 ~ 2016년 12월

- 사업내용 : 보조수원공 개발 및 수리시설 정비 등

❍ 단성면 백곡 배수장 가동으로 영농기반 확보

- 사 업 량 : 배수장(160kw×1000mm×2대) 1식

- 사 업 비 : 2,500백만원(도비 30%, 국비 70%)

- 사업내용 : 배수펌프장, 전기‧기계설비, 유수지 조성 등

재해의 근원적 예방대책 사업 추진으로 군민의 생명과 재산보호

사 업 명	사 업 비	사 업 량	사업 기간	그간추진사항
계	57,290백만원	4개 사업
삼장면 대원사 급경사 붕괴 위험지구 정비	2,817백만원(국비 1,409, 도비 422, 군비 986)	사면정비 L=1.28Km	15.1~ 17.12	16.03: 실시설계용역준공 16.04:1차분 사업시행
신안면 적벽산 급경사붕괴 위험지구 정비	29,184백만원(국비14,592, 도비4,378,군비 10,214)	우회도로개설 L=1.0km 국도3호선램프설치 1개소 등	13.1~ 17.12	15.05:피암터널 관련 예산 과다 및 공법재검토 등의 사유로 보류(경남도) 15.10:우회도로 관련 실시 설계용역 시행 16.08:3차 주민설명회결과 우회도로 개설 결정
산청읍 지리 자연재해 위험 개선지구 정비	16,268백만원(국비8,149, 도비2,445,군비5,704)	교량1개소 고지배수로 363m 배수펌프장 1개소 등	14.1~ 17.12	16.01:2차분 사업시행 16.04:1차분 사업준공
단성면 강누 우수저류시설 설치	9,021백만원(국비4,510, 도비902,군비 3,609)	우수저류시설1식 강누천 개수 230m 교량 1개소	15.1~ 17.12	16.03:1차분 사업시행 16.09:실시설계용역 준공

❍ 재난종합상황실 내 지진가속도 계측기 설치

- 사 업 량 : 계측기 1대

- 사 업 비 : 120백만원

❍ 재난 발생 시 신속한 상황전파를 위한 농어촌 경보시설 설치

- 사 업 량 : 오부면 외 6개소

- 사 업 비 : 119백만원

2. 과 제

공익사업에 필요한 토지 등에 대한 신속한 손실보상 협의 추진

❍ 공익사업의 원활한 추진과 조기 발주를 위해 원만한 매수 협의

❍ 매수 협의 불가한 토지 등에 대하여 토지 수용 재결 추진

재난 초기대응 기능 강화 필요

❍ 재난상황실 24시간 전담 공무원 배치로 신속한 재난대응체계 구축

❍ 재난 원인조사 및 분석, 재난관리자원 공동활용시스템 운영

재난 예방·대비 기능 강화 및 안전문화운동 활성화

❍ 재난상황에 맞는 위기상황 매뉴얼 작성 및 생활주변 위해요소 안전      신문고 신고 활성화 필요

❍ 주민대상 안전문화운동 전개·홍보, 안전점검의 날 행사 추진

군민이 안전 및 편리하게 이용 할 수 있는 도로(군·농어촌)건설 사업 시행

❍ 국·도비 지원이 없고 자체사업비로만 추진함에 따른 사업기간 장기화 ⇒ 계속사업에 집중 투자하여 시행사업 조기 마무리 추진

❍ 농촌도로 신규지구는 버스 진출입이 불가한 지구를 우선 선정

❍ 신규사업은 주민 수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진 하되 사업 첫해에 보상 시행하여 보상 실적이 높은 지구부터 추진

❍ 2017년 이후 사업내용

(단위 : km, 백만원)

구분	지구수	연 장	사 업 비	비고
계			24,601
2017년	17개소	12.41	7,280	군도5.15km, 4,700백만원 농촌도로7.26km 2,580백만원
2017년 이후	12개소	13.54,	17,321	군도2.18km, 1,761백만원 농촌도로11.36km 15,560백만원

교량보수 및 기타 도로사업 추진

❍ 관내 보수가 필요한 교량에 보수공사를 시행하여 교량의 기능 복원이 필요함

- 교량보수대상 : 장란교 등 11개소, 730백만원

❍ 관내 군도 및 농촌도로상 노후시설 및 안전시설 미설치구간, 배수로 미 정비구간 정비 및 교통사고의 위험 요소가 있는 지구에 대해 우선적으로 정비 추진

- 유지관리 대상 도로 : 217개 노선, 939.5km ( 국 도 1개 노선 45.2km ,

지방도 9개노선 130.3km, 군도 20개노선 225.2km, 농촌도로 187개노선 338.2km )

명상교 재 가설 공사 조속한 완공

❍ 노후 및 침수 교량인 명상교를 재 가설하여 지역주민 및 관광객 통행불편 해소

❍ 2017년 우수기 전 마무리하여 교량가설로 인한 주민불편 최소화

- 사업개요 : 교량가설 L=52m, 접속도로 L=128m, 2,700백만원

농업생산기반시설 유지관리비 확보

❍ 매년 수리시설 증가 및 시설 노후에 따른 유지관리의 필요성이 증가되고 있으나, 유지관리 수요 대비 예산 부족으로 사업 발굴 및 국도비 예산 확보가 요구됨.

❍ 2017년 사업계획

(단위 : 백만원)

구분	합계	환경정비	유지보수 (군)	유지보수 (농촌공사)	퇴적물제거	저수지개보수	비고
사업량	241개소	185개소	11개소	25개소	11개소	9개소
사업비	2,855.5	55.5	165	625	110	1,900

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
편리하고 안전한 사회기반시설 확충 및 정비

	7대 역점시책
소규모 주민숙원사업 추진 효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축 군민과 함께하는 생활안전문화 운동 활성화 교통편익 증진 및 생활환경 도로정비 안전하고 아름다운 하천관리 지역경제 활성화를 위한 농업기반 정비 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책

⇑

	역점시책별 이행과제
소규모 주민숙원 사업 추진 ◦ 소규모 주민숙원사업 군 시행 ◦ 읍·면 주민숙원사업 효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축 ◦ 재난안전상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축 ◦ 재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련 실시

	역점시책별 이행과제
군민과 함께하는 생활안전문화 운동 활성화 ◦ 생활안전을 위한 안전점검 활동 전개 ◦ 생활안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비 ◦ 군도 확·포장 사업 추진 ◦ 농어촌도로 확·포장사업 추진 ◦ 교량보수 및 기타 도로사업 정비 안전하고 아름다운 하천관리 ◦ 재해예방 하천유지관리 ◦ 자연친화적 하천시설 정비 ◦ 퇴적물제거 및 유수지장목 제거 지역경제 활성화를 위한 농업기반 정비 ◦ 밭기반 정비 ◦ 시군수리시설 개보수 사업 추진 ◦ 농업기반 주민숙원사업 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 ◦ 급경사지 붕괴위험지역 정비 ◦ 강누 우수저류시설 설치 ◦ 내리 서민밀집위험지역 도로개설 ◦ 홍수재해 통합관리시스템 설치

Ⅳ. 2017년도 주요업무계획

편리하고 안전한 사회기반시설 확충 및 정비

소규모 주민숙원사업 추진

효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축

군민과 함께하는 생활안전문화 운동 활성화

교통편익 증민 및 생활환경 개선 도로정비

안전하고 아름다운 하천관리

지역경제 활성화를 위한 농업기반 정비

자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

역점시책

1. 소규모 주민숙원사업 추진

역점

시책

소규모 주민숙원사업(군시행)

❍ 농촌주거환경 개선과 주민불편시설에 대한 정비사업 시행

- 위  치 : 산청읍 외 10개면

- 사업량 : 군시행 41건(2016년 23건)

- 사업비 : 9,715백만원 (2016년 3,740백만원)

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : ‘16. 10월 ~ ‘16. 12월

- 조사측량 및 설계             : ‘16. 12월 ~ ‘17. 02월

- 사업시행 및 준공             : ‘17. 03월 ~ ‘17. 10월

※ 소규모 주민숙원(군시행)사업은 사업비 1억 이상 사업을 읍면별 선정 후 군에서 사업시행

읍·면 주민숙원사업

❍ 농촌주거환경 개선 및 주민불편시설 중 소규모 읍면 자체 정비사업 시행

- 위  치 : 산청읍 외 10개면

- 사업량 : 읍면시행 159건(2016년 117건)

- 사업비 :  5,065백만원(2016년 3,562백만원)

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : ‘16. 10월 ~ ‘16. 12월

- 조사측량 및 자체설계         : ‘16. 12월 ~ ‘17. 02월

- 사업시행 및 준공             : ‘17. 03월 ~ ‘17.  7월

※ 읍면 주민숙원사업은 합동 설계를 통한 자체설계로 예산절감 및 사업조기발주

2. 효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축

역점

시책

❖ 유관기관과의 안전총괄체계 협업으로 위기관리 체계 구축

□ 효율적이고 체계적인 대응체계 구축으로 군민의 재산과 생명 보호

재난안전상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축

❍ 재난상황실 24시간 상황체계 유지 : 주·야간 3명

❍ 재난 종류·상황별 유관기관 협조체제 구축

- 핫라인 구축 : 안전건설과-산청경찰서-산청소방서

▪ 재난발생 즉시 연락

- 재난관리책임기관 실무담당자 및 현장책임자 비상연락망 정비

- 재난관리책임기관별 임무 및 역할 조정 간담회 실시

재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련실시

❍ 재난위기관리 점검 합동훈련 실시

- 재난대응 안전한국훈련, 긴급구조통제단 기동훈련 등

❍ 재난안전관련 표준행동매뉴얼 작성(정비)

- 안전관리계획 수립(유관기관 재난안전관리대책 포함) : 년 1회

- 사회·자연재난 표준행동매뉴얼 작성 : 년 1회

❍ 부서별 재난안전 관리자·실무자 안전교육 실시 : 수시

3. 군민과 함께하는 생활안전문화 운동 활성화

역점

시책

생활안전을 위한 안전점검 활동 전개

❍ 특정관리대상 시설물 위험요인 안전점검 실시 : 2회(상․하반기)

- 대상 : 138개소(교량, 전통시장, 다중이용시설, 판매시설 등)

❍ 계절별 안전점검 실시 : 5회(설날, 해빙기, 우기전, 추석, 동절기)

❍ 축제 행사장 안전관리계획 심의 및 안전점검 실시 : 4회

❍ 국가안전대진단 실시(2016.2.15 ~ 4.30)

- 대상 : 36개 분야 639개소(공공시설 339개소, 민간시설 300개소)

- 내용 : 특정관리대상시설 등 생활주변 주요 시설물 안전진단 실시

생활안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취

❍ 매월 안전점검의 날 행사 추진 : 12회

- 안전의식 고취를 위한 민∙관합동 캠페인 전개 및 안전수칙 홍보

❍ 군민 안전사고 예방 계절별 안전교육 동영상 시청 : 분기 1회

❍ 안전신문고 앱 설치 및 안전신고 방법 홍보 : 수시

- 생활주변 위험요소 사전 제거로 안전한 사회만들기 문화 정착

❍ 관내 초등학생 대상 찾아가는 어린이 재난안전교실 운영

(소방서 협조)

4. 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비

역점

시책

군도 확·포장사업 추진

❍ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 량 : 8개소(명상교 재가설 공사 외 7),  5.15Km

❍ 사 업 비 : 4,700백만원 (군비)

❍ 사업내용 : 도로확․포장 및 안전시설 설치 8건/5.15Km

※ 지구별 사업내역                                (단위:km/백만원)

구분	계	명상	임천	내수	수월	천평	내원사	갈전	방골
사업량	5.15	교량1식	1.87	0.56	1.08	0.7	안전1식	0.36	0.58
사업비	4,700	1,000	1,300	700	1,000	120	150	300	130

농어촌도로 확·포장사업 추진

❍ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 량 : 9개소(삼당도로 확포장 외 8), 7.26Km

❍ 총사업비 : 2,580백만원 (군비)

❍ 사업내용 : 도로 확포장 및 안전 시설 설치 9건/7.26Km

※ 지구별 사업내역                                 (단위:km/백만원)

구분	계	오휴	삼당	중태	내원	명동	법물	매골	상정	외송
사업량	7.26	1.0	0.59	1.27	1.65	0.2	0.15	0.61	0.49	1.3
사업비	2,580	450	350	400	200	300	200	150	180	350

교량보수 및 기타도로사업

❍ 위    치 : 군 관내 군도 및 농어촌도로

❍ 사업기간 : 2017. 01. ~ 2017. 12.

❍ 총사업비 : 군비 2,216백만원

❍ 사 업 량

- 도로 주민숙원 사업 : 13개소 700백만원

- 교량점검 및 보수  : 168개소 730백만원

- 도로유지 및 보수    : 786백만원

5. 안전하고 아름다운 하천관리

역점

시책

□ 하천사용의 이익을 증진하고 하천을 자연친화적으로 정비·보전하며

하천의 유수로 인한 피해 예방

□ 하천을 적정하게 관리하여 공공복리 증진에 이바지

재해예방 하천유지관리

❍ 봄,가을 하천제방 정비사업 실시 : 전읍·면 11개소

❍ 제방풀베기사업(춘추계) 50개소 505백만원

❍ 노후배수문 유지관리

자연친화적 하천시설 정비

❍ 지방하천유지관리사업 : 6개소 2,180백만원              (단위:백만원)

구 분		사 업 량	사 업 비	비고
계	6개소	2km	2,180
군시행 (보조사업)	일반하천정비사업(계남지구)	0.35km	500	신규
군시행 (자체사업)	계남천 정비공사	0.6km	600	신규
	단계천 (우사지구)정비공사	0.2km	250	신규
	금서천 (향양지구)정비공사	0.2km	200	신규
	신아천 (쌍효지구)정비사업	0.6km	600	신규
읍면시행 (자체사업)	내대천 정비공사	0.05km	30	신규

❍ 소하천유지관리사업 : 11개소 2,910백만원               (단위:백만원)

구 분			사업량	사업비	비고
총 계		11개소	4.9km	2,910
계			3.5km	2,000
군시행 (보조사업)	석남소하천정비사업		1.5km	1,600	계속
	내정소하천정비사업		2.0km	400	신규
계			1.4km	910
군시행 (자체사업)	곡소 소하천정비사업		0.2km	200	신규
	중촌 소하천정비사업		0.2km	110	신규
	구만 소하천정비사업		0.1km	100	신규
	덕촌 소하천정비사업		0.2km	200	신규
읍면시행 (자체사업)	왕촌 2소하천 정비사업		0.1km	30	신규
	오전 2소하천 정비사업		0.1km	30	신규
	원기 소하천정비사업		0.1km	30	신규
	사동 소하천정비사업		0.1km	30	신규
	원계남 소하천정비사업		0.3km	180	신규

❍ 국가하천유지관리사업

- 국가하천 내 풀베기 및 시설물 유지관리 250백만원

퇴적물제거 및 유수지장목 제거

❍ 지방하천 51개소 하천퇴적물 제거

❍ 소하천 198개소 하천퇴적물 제거

❍ 효율적인 관리를 위한 단계적 유수지장목 제거사업 추진

❍ 총 사업비 1,000백만원

6. 지역경제 활성화를 위한 농업기반 정비

역점

시책

밭기반 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 단성면 관정리 일원

❍ 사업기간 : 2010년 01월 ~ 2017년 12월

❍ 사 업 량 : 밭기반 정비 A=78ha

❍ 투자계획                                             (단위:백만원)

구분	합계	2016년까지	2017년	비고
합계	2,065	1,253	812
국비(지특)	1,652	1,002	650
도비	164	115	49
군비	249	136	113

시군수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 차탄리외 5개소 일원

❍ 사업기간 /사업량 : 2017년 01월 ~ 6월/저수지 개보수 6개소

❍ 투자계획                                             (단위:백만원)

구분	합계	가실음 지 구	애물골 지 구	가마골 지 구	밤나무골 지 구	용흥 지구	솔가 지구	비고
합계	1,600	200	200	200	250	350	400
국비(지특)	1,280	160	160	160	200	280	320
도비	96	12	12	12	15	21	24
군비	224	28	28	28	35	49	56

농업기반 주민숙원사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍외 10개면

❍ 사업기간 : 2017년 01월 ~ 2017년 12월

❍ 사 업 량/사 업 비 : 읍면 주민숙원사업 88건 / 3,316백만원

❍ 기대효과 : 영농 기반 조성으로 오랜 주민숙원 해소

❍ 기    타 : 주민숙원사업은 군 전체 예산 범위 내 시행계획

7. 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

역점

시책

급경사지 붕괴위험지역 정비

사 업 명	위치	사업기간	사 업 비	사 업 량
계			34,115백만원
적벽산 급경사지 붕괴위험지역	신안면 하정리 일원	13.01~18.12	29,184백만원(국비 14,592 (도비 4,377,군비10,215)	우회도로개설L=1.0km 국도진출램프설치2개소
대원사 급경사지 붕괴위험지역	삼장면 평촌리 일원	15.01~17.12	2,817백만원(국비1,409 도비 422, 군비986)	사면정비 개설 L=1.28km
지리2 급경사지 붕괴위험지역	산청읍 지리 일원	16.01~18.12	2,114백만원(국비1,057 도비 317, 군비 740)	옹벽 및사면정리 L=100m

강누 우수저류시설 설치

❍ 위    치 : 산청군 단성면 강누리 일원

❍ 사업기간 : 2015. 01. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 비 : 9,021백만원(국4,510백만원/도902백만원/군3,609백만원)

❍ 사 업 량 : 우수저류시설 1식, 강누천 개수 230m, 교량 1개소

내리 서민밀집위험지역 도로개설

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 내리

❍ 사업기간 : 2016. 04. ~ 2018. 04.

❍ 사 업 비 : 2,000백만원(도1,000백만원/군1,000백만원)

❍ 사 업 량 : 도로개설 L=0.8km, 교량 1개소

홍수재해 통합관리시스템 설치

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 산청군청 내

❍ 사업기간 : 2016. 05. ~ 2017. 12.

❍ 사 업 비 : 330백만원(도182백만원/군148백만원)

❍ 사 업 량 : 통합관리시스템 1식

Ⅴ. 주요 현안사업

내리마당재 진입로 확·포장사업

중산리∼두류동 주차장 조성

주상∼자혜간 도로 숭상 및 확·포장

내수∼내곡간 도로 확·포장공사

명상교 재가설 공사

국도·지방도 국도건설공사 추진

하천 뚝방길 조성사업

□ 퇴적물 제거사업

□ 소하천정비 종합계획 수립

덕천강 고향의 강 조성사업

재해위험저수지 정비사업

상정지구 소규모 배수개선사업

오성 및 방곡지구 용수개발사업

지리자연재해위험개선지구 정비사업

1. 내리 마당재 진입로 확․포장사업

❖ 귀농․귀촌으로 형성된 전원주택 단지의 인구 증가로 차량 통행량이 증가하고 있으나 기존 진입도로가 협소하여 주민불편을 초래하고 있어 진입도로 확포장으로 교통사고 예방 등 주민불편사항을 해소하고자 함.

추진방향

❍ 도로 폭 확장 및 안전시설 설치를 통하여 주민의 안전과 차량 교행

및 대형차량 진출입이 가능하도록 사업추진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 산청읍 내리 일원

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=500m(B=6.0m)

❍ 사 업 비 : 700백만원(2016년이전 200백만원, 2017년 500백만원)

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

그간 추진사항

❍ 2015년 주민숙원사업(군시행) 추진 및 완료

- 내리마당재 진입로확포장공사 중 고속도로 횡단교량 전후 구간

(L=100m)확포장공사 완료 : 2015년 09월

추진계획

❍ 사업예산확보                   : ’16. 10월 ~ ’16. 12월

❍ 편입부지 매입 및 실시설계      : ’16. 12월 ~ ’17.  03월

❍ 사업시행 및 준공               : ’17.  03월 ~ ’17. 12월

기대효과

❍ 교통사고 위험 감소 등 주민불편사항 해소

❍ 정주여건 개선을 통한 인구유입 증대 기여

2. 중산리~두류동 주차장 조성

❖ 휴가철 지리산 중산리를 방문하는 관광객들의 도로변 주차로 인하여 마을 내 교통이 마비되어 주민이 이용할 수 있는 주차공간이 부족하여 주차장 설치로 주민불편사항을 해소하고자 함.

추진방향

❍ 마을 주민과 협의를 통하여 주민들의 생활공간과 밀접한 지역을

선정하여 주차장 조성

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 중산리 일원

❍ 사 업 량 : 주차장 조성 1식

❍ 사 업 비 : 300백만원

❍ 사업기간 : 2017년 01월 ~ 2017년 12월

추진계획

❍ 사업예산확보                   : ’16. 10월 ~ ’16. 12월

❍ 편입부지 매입 및 실시설계      : ’16. 12월 ~ ’17.  3월

❍ 사업시행 및 준공               : ’17. 03월 ~ ’17. 12월

기대효과

❍ 주차공간 확보로 지리산 등을 찾는 관광객들의 불편해소

❍ 지역주민 숙원사업 해결로 주민편익 증대

3. 주상∼자혜간  도로 숭상 및 확·포장공사

❖ 지방하천(임천)과 연접한 도로(군도15호)로서 폭이 협소(B=4.0m)

하고 집중호우시 하천 범람으로 도로가 침수되어 차량통행이 불가

하며, 수시로 낙석이 발생하여 재해위험이 많은 도로임.

추진방향

❍ 임천지구 수해상습지 개선사업에 포함하여 사업추진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 금서면 주상리 ~ 자혜리(군도15호)

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=1.87km, B=8.0m

❍ 사 업 비 : 5,776백만원(국1,988, 도1,988, 군1,800)

2016까지 3,328.5, 2017년 2,447.5

그간 추진사항

❍ 2014. 05월 : 임천지구 수해상습지 개선사업에 포함하여 실시설계 완료

❍ 2014. 07월 : 경상남도와 국토교통부 총사업비 협의시 도로부분 제외

❍ 2015. 07월 : 고충민원 조정회의(하천구역 내 사업은 하천사업과 병행추진)

❍ 2015. 12. 10 : 도로부분 설계 완료

❍ 2016. 01~03월 : 계약심사완료

❍ 2016. 03. 30 : 공사착공(현 공정 30%)

추진계획

❍ 2017년 12월 하천, 도로 전 공정 완료계획

기대효과

❍ 지역주민 생활불편 해소 및 농산물 수송원활로 경제활동 활성화

❍ 차량통행 안전사고 사전예방

4. 내수~매곡간 도로 확·포장공사

❖ 산청읍 내수리와 차황면 매곡리를 연결하는 군도 8호선 미 연결 구간에 대하여 도로개설 및 도로 확포장을 하여 지역 간의 균형

발전에 기여 하고자 함.

추진방향

❍ 군도 정비계획에 의거 연차적으로 예산 확보 후 추진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 산청읍 내수리 군도8호선

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=2.3Km, B=8.0m

❍ 사 업 비 : 4,950백만원(2016년까지 4,250, 2017년 700)

❍ 사업내용 : 도로개설 및 확포장 L=2.3Km, B=8.0m

그간 추진사항

❍  16. 06월 : 1공구 L=1.8Km 공사완료

❍  16. 06월 : 2공구 L=0.56km 공사착수(현공정 15%)

추진계획

❍ 17년 06월 2공구 L=0.56Km 공사 완료

기대효과

❍ 도로확포장으로 지역균형발전 기여

5. 명상교 재가설공사

❖ 호우 시 교량이 범람하여 지리산과 대원사를 찾는 내방객들의 안전사고 위험이 노출되어 있어 교량 재가설이 필요함.

추진방향

❍ 지형적 여건을 감안 경제적이고 실용적인 공법으로 안전한 교량 가설

❍ 하천정비 기본계획에 맞게 통수단면을 확보하여 호우시에도 안전한 통행이 가능한 교량 가설

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 삼장면 평촌리

❍ 사 업 량 : 교량 L=52m, B=12m, 접속도로 L=128m

❍ 사 업 비 : 2,700백만원(도 1,000, 군1,700), 16년 1,700,  17년 1,000

그간 추진사항

❍ ‘14. 04월 : 지방재정투융자심사 완료

❍ ‘15. 01월 : 도지사 방문시 건의 도비10억 확보

❍ ‘16. 02월 : 재가설을 위한 실시설계 완료

❍ ‘16. 03월 : 경상남도 하천공작물 설치허가 완료

❍ ‘16. 07월 : 허가조건사항 및 주민건의사항 설계보완

❍ ‘16. 08월 : 사업 착공

추진계획

❍ 사업추진  : ’16. 10 ~ ‘17. 10월

기대효과

❍ 집중호우 시 두절되는 교량을 재가설로 안전한 통행환경 확보

❍ 지리산을 찾는 관광객에 깨끗한 이미지 제공

6. 국도·지방도 건설사업 추진

삼장~산청 국도건설공사(밤머리재터널)

❍ 위  치 : 경남 산청군 삼장면 홍계리 상촌 ~ 금서면 평촌리(국도 59호선)

❍ 사업량 : 도로확포장 L = 6.00㎞,B=11.5m(터널 2.998m, 교량3개 141m)

❍ 사업비 : 1,063억원(16년 105억원, 17년 이후 958억원)

❍ 시행청 : 부산지방국토관리청

❍ 사업기간 : 2016.04.11~ 2022.05.31(예정)

❍ 추진공정 : 5%

- 현장사무실 건축(지막리155-5),  5월 도로구역 변경 결정고시

- 9월 분할측량 완료 및 보상협의, 터널굴착공사(20년 6월까지)

❍ 시 공 사 : 금호산업㈜,  롯데건설(주), ㈜한라

❍ 향후계획 : 2022. 05월 준공예정

산청∼금서간 국지도60호선 개량사업

❍ 위  치 : 산청군 금서면 신아리~화계리

❍ 사업량 : 도로선형개량 L=3.2km, B=9.0m

❍ 사업비 : 183억원(국․도비)

❍ 시행청 : 경상남도(부산지방국토관리청 설계)

❍ 추진상황

- 2014. 04월 경상남도에 중장기적으로 제4차 국지도5개년(‘16~’20)

사업 반영 건의

- 2015. 01월 도지사 우리군 방문시 사업건의

- 2016. 08월 국토부 제4차 국지도5개년 추가반영 확정

- 2016. 09월 실시설계비 1억 배정(국토교통부⇒부산지방국토관리청)

❍ 향후계획 : 2016. 11월 실시설계 착수예정, 설계완료 후 사업시행

신안~생비량간 국도20호선 건설공사

❍ 위  치 : 산청군 단성면 강누리 ~ 산청군 생비량면 도리

❍ 사업량 : 도로확포장L=9.2km, B=19.5m

❍ 추정 사업비 : 1,513억원(실시설계결과)

❍ 시행청 : 부산지방국토관리청

❍ 추진상황

- 2010. 06월 : 예비 타당성 조사(기재부)

- 2014. 12월 : 기본 및 실시설계 ( 2011. 12. 19 ~ 2014. 12)

- 2015. 03월 :  총사업비 조정요구서 제출(국토부→기재부)

- 2016. 03월 :  타당성재조사 의뢰(예타대비 노선변경50%, 사업비증가)

❍ 향후계획

- 2016. 11월 : 타재결과에 따라 총사업비 협의 재요청

- 2017. 1월 : 총 사업비 협의 후 보상 및 사업시행

단성~시천간 국도20호선 건설공사

❍ 위  치 : 경남 산청군 단성면 사월리, 남사리, 시천면 사리 일원

❍ 사업량 : 도로확포장  L = 2.8㎞, B=19.5m

❍ 추정 사업비 : 385억원

❍ 기본 설계용역 : 2009. 03  ~  2012. 12.30(용역비 : 1,289백만원)

❍ 추진현황

- 2008. 08월 : 예비타당성조사

- 2011. 11월 : 기본설계용역 완료

- 2016. 03월 : 타당성재조사 결과 타당성 부족으로 사업제외 검토

- 2016. 06월 : 호국원 구간 및 소리당 앞 침수구간 확장 건의

- 2016. 08월 : 제4차 국지도5개년 추가반영 확정(L=2.8Km,사업비 385억)

- 2016. 10월 : 실시설계착수

❍ 향후계획

- 2017. 12월 : 실시설계 완료

- 2018년 이후 : 보상 및 공사시행

7. 하천 뚝방길 조성사업

❖ 하천 제방의 뚝방길 조성으로 주민의 산책로 및 여가공간을 위한

친수공간 확보와 주민편익증진

❖ 하천 사용 증대와 조경수 식재 등, 아름다운 하천변 조성으로 찾아

오는 관광 산청에 기여

추진방향

❍ 주민의 여가공간, 친수공간 확보와 조경수 식재로 아름다운 하천변 조성

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 관내 남강변

❍ 사업량/사업비 : 하천정비 L=15km/ 1,500백만원(군비1,500)

❍ 사업내용 : 하천변 주민 쉼터 조성 및 소공원 조성

그간 추진사항

❍ 2014년 10월 : 고수 부지 유채꽃 식재

❍ 2015년 03월 ~ 04월 : 실시설계 용역 시행

❍ 2015년 10월 ∼ 2016년 10월 : 단성 강누변 하천 뚝방길 조성

❍ 2015년 10월 : 갈전제 하천뚝방길 조성

추진계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2015	2016	2017 이후	비고
사업비	1,500	250	500	750
사업량	L=15km	하천뚝방길조성 (단성, 신안면)	하천뚝방길조성(산청읍등)	하천뚝방길조성 (생초면등)

❍ 사업추진 : ’17. 01 ~ 12월

기대효과

❍ 친화적인 하천환경 조성으로 주민여가 생활 증대

8. 퇴적물 제거사업

❖ 각종 수해로 인하여 하천 퇴적물이 쌓여 하상이 숭상된 지역에

대하여 제방 범람의 위험 요소인 퇴적물과 유수지장물을 제거하여

수해피해를 예방하고자 함

추진방향

❍ 수해로 인하여 하상이 숭상된 지역 우선 제거 실시

❍ 퇴적물 제거사업과 병행하여 하도개량(물길 돌리기)사업 실시

❍ 하천 내 퇴적을 유발하는 유수 지장목 동시 제거 추진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 관내 하천

❍ 사 업 량 : 퇴적물 제거 A=100,000㎡, 유수지장목 제거 5km

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(군비1,000)

❍ 사업내용 : 퇴적물 제거 및 유수지장목 제거

그간 추진사항

❍ 2016. 01~02월 : 하천퇴적물 대상지 조사

❍ 2016. 3~6월 : 하천퇴적물 제거 사업 시행

❍ 2016. 8~10월 : 유수지장목 제거 사업 시행

추진계획

❍ 퇴적물 및 지장목 제거대상지 조사 : ’17. 01 ~ 02월

❍ 사업시행 : ‘17년 3월

기대효과

❍ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

9. 소하천정비 종합계획수립

❖ 우리군 관내 198개소의 소하천에 기본계획을 수립하여 소하천

관리에 만전을 기하고자 함(소하천정비법 제6조의 규정에 따라 10년

단위의 소하천정비종합계획을 수립하여야 함)

추진방향

❍ 하천유역의 변동 상황을 고려하여 소하천별 기본계획 수립

❍ 유역의 특성 등 일반현황과 강우빈도, 기상 등 자연조건을 반영

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 소하천

❍ 사 업 량 : 소하천 215개소 L=243.91km

❍ 사 업 비 : 4,310백만원(군비4,310)

❍ 사업내용 : 소하천 종합계획수립 및 지형도면 고시

그간 추진사항

❍ 2014. 05월 : 과업 착수

❍ 2015. 07월 : 소하천 지정 및 폐지 변경 결정

추진계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2016년까지	2017	비고
사업비	4,310	3,500	810
사업량	215개소	종합계획 기본 및 조사측량	종합계획 수립 지형도면 작성

❍ 2017. 01월 : 잔여부 사업 발주

❍ 2017. 06월 : 소하천정비 종합계획수립 완료

기대효과

❍ 소하천정비 종합계획 수립에 따라 체계적인 소하천관리 이행

10. 덕천강 고향의 강 조성사업

❖ 우리군 대표하천인 덕천강을 대상으로 지역의 역사와 문화, 생태

기능을 연계하여,

❖ 고향의 정취를 만끽할 수 있는 정감어린 다기능 복합 친수공간으로 조성

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 사리 ~ 삼장면 대포리

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=5.1km

❍ 사 업 비 : 27,058백만원(국비16,235, 도비3,247, 군비7,576)

❍ 사업내용 : 하도정비, 공원조성, 하천환경정비

그간 추진사항

❍ 2011~2013년 실시설계용역 시행

❍ 2012~2014년 토지보상 실시

- 122필지 7,954백만원(협의 88필지 7,130, 미협의 34필지 824)

❍ 2013. 08월 총사업비 협의(부산지방국토관리청, 경상남도)

❍ 2015. 12월 공사 착수

추진계획

(단위:백만원)

구분	계	기투자	2016	2017	2018 이후	비고
사업비	27,058	12,027	2,998	5,000	7,033
사업량	L=5.1km	실시설계	하도준설 친수공간조성	하도준설 친수공간조성	하도정비 하천환경정비

❍ 사업추진 : 2017. 01 ~ 12월

❍ 2019. 12월 완공

기대효과

❍ 친화적인 하천환경 조성으로 주민여가 생활 증대

❍ 지역명물 대표하천을 조성하여 관광객 유치로 지역소득 증대 기여

11. 재해위험저수지 정비사업

❖ 농업용 저수지 노후화로 붕괴사고 등 저수지 안전관리에 대한 중요성이 대두됨에 따라,

❖ 재해 발생 위험이 높은 관내 위험저수지에 대하여 정비사업 시행으로 재해예방

추진방향

❍「저수지·댐의 안전관리 및 재해예방에 관한 법률」에 의거  재해위험저수지에 대하여 중점 관리

❍ 재해위험저수지(D등급)에 대하여 재해위험저수지 5개년 정비계획에 의거 정비사업 추진

사업개요

❍ 대  상 : 하양, 강정, 월곡, 큰골저수지

(단위 : 백만원)

저수지명	합계		2016년까지		2017년		2018년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	4건	3,800	1건	1,000		150	3건	2,650	국비 50% 도비 15% 군비 35%
하양	제당54m	1,000	제당54m	1,000
강정	제당53m	500			설계1식	50	제당53m	450
월곡	제당130m	1,800			설계1식	100	제당130m	1,700
큰골	제당85m	500					제당85m	500

추진계획

❍ 하양 재해위험저수지 정비사업 : ’15. 08 ~ ‘16. 12월

❍ 강정 재해위험저수지 정비사업 : ’17. 01 ~ ‘18. 12월

❍ 월곡 재해위험저수지 정비사업 : ’17. 01 ~ ‘18. 12월

❍ 큰골 재해위험저수지 정비사업 : ’18. 01 ~ ‘19. 12월

기대효과

❍ 안전한 영농환경 조성과 안정적인 용수공급으로 농가 소득 증대 및 재해예방

12. 상정지구 소규모 배수개선사업

❖ 매년 우수기 반복적인 농작물 침수피해로 영농 불안정을 겪고 주민 상실감이 깊어가는 농업진흥지역에 대한 배수시설 설치 등 배수

개선을 통해 재해예방 및 안전영농기반 조성으로 소득 증대에 기여

추진방향

❍ 도비 보조사업으로 상습적 침수피해를 입는 경지정리지구를 대상사업 추진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 신안면 하정리 일원

❍ 사 업 량 : 배수장(150kw×2대) 1식

❍ 사 업 비 : 2,100백만원(도 30%, 군70%)

(단위 : 백만원)

구분	합계	2016년까지	2017년	비고
합계	2,100	1,416	684
도비	555	350	205
군비	1,545	1,066	479

❍ 사업내용 : 상정지구 상습침수지역(A=24ha) 배수장 신설

그간 추진사항

❍ 기본 및 실시설계 : ’14. 02 ~ 06월

❍ 2015년 도비보조사업(신규) 신청 : : ’14. 09월

❍ 보상 협의 : : ’14. 11 ~ ‘15. 06월

추진계획

❍  공사 준공  : ’17. 06월

기대효과

❍ 배수장 설치를 통해 농작물 침수피해 예방 등 사전재해예방

❍ 주민숙원해소 및 안정적 영농여건 조성으로 농업생산성 향상

13. 오성 및 방곡지구 용수개발사업

❖ 농업용수 부족으로 매년 한발을 겪고 있는 상습 한해지역에 대하여 농업 용수원을 개발하여 안정적인 용수공급

추진방향

❍ 한국농어촌공사 시행 전액 국비사업으로 산청 북부권역 한해

해소를 위한 용수 개발

❍ 한국농어촌공사 진주·산청지사 시행

사업개요

구분	위치	수혜면적	총사업비 (2017년도)	사업량	비고
오성지구	오부면 방곡리	93.7ha	20,871백만원 (4,000백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 7조 L=7.9km
방곡지구	금서면 방곡리	345ha	39,745백만원 (4,000백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 5조 L=9.8km

그간 추진사항

❍ 오성지구

- 기본 및 실시설계 : ’98. 03월

- 다목적농촌용수개발사업 신규 착수지구 선정 : ‘15. 05월

- 실시설계 보완 : ‘15. 06월 ~ ‘16. 12월

❍ 방곡지구

- 시행계획 승인 : ’15. 06월

- 공사 착공 : ‘15. 09월

추진계획

❍ 오성지구 : 공사 착공 및 보상협의( ’17. 01월 ~’21. 12월)

❍ 방곡지구 : 공사 시행 및 보상협의( ’15. 09월 ~’20. 12월)

기대효과

❍ 안정적인 용수 공급으로 주민 우심 해소 및 농가 소득 증대

14. 지리 자연재해위험개선지구 정비사업

❖ 재해 발생 우려가 높은 자연재해 위험 개선지구에 조속한 정비사업 추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경 조성

추진방향

❍ 자연재해위험개선지구로 지정된 재해취약시설에 대한 조속한 정비

사업 시행으로 재해예방

❍ 재해로 인한 피해 최소화로 주민의 생명과 재산 보호

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 산청읍 지리 지내

❍ 사 업 비 : 16,298백만원(국비 8,149 , 도비 2,444.7, 군비 5,704.3)

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2017년이후	비고
계	16,298	8,664	7,634
국 비	8,149	4332	3817
도 비	2,444.7	1299.6	1145.1
군 비	5,704.3	3032.4	2671.9

❍ 사업내용 : 교량1개소, 고지배수로 363m, 배수펌프장 1개소 등

❍ 사업기간 : 2014. 01. ~ 2017. 12.

그간 추진사항

❍ 총괄 1차분 사업시행 : 2015. 6. 29.

❍ 건설관리 용역 시행 : 2015. 11. 11.

❍ 2차분 사업시행 : 2016. 01. 26.

❍ 1차분 사업완료 : 2016. 04. 23

추진계획

❍ 2차분 사업완료 : 2016. 01 ~ 12.

❍ 3차분 사업시행 : 2017. 01. ~ 2017. 12

기대효과

❍ 잦은 침수피해 해소 및 군민의 생명과 재산보호

Ⅵ. 특수(신규)시책

녹색산청과 부합하는 차량방호시설 도입

산청군 수자원 확보사업 추진

1. 녹색산청과 부합하는 차량방호시설 도입

❖ 군정방침(녹색산청)에 부응하도록 도로방호시설 설치시 주요도로 및 관광지 주변 가드레일 등 방호시설 설계시 녹색제품 우선반영

추진방향

❍ 차량방호시설(가드레일) 및 교량 난간 등 설계시 녹색제품 반영

❍ 녹색제품 반영 및 설치로 군정방침에 부응

사업개요

❍ 위    치  : 관내 주요 관광지 주변도로 등

❍ 사 업 량 : 가드레일 및 교량난간

❍ 사업내용 : 가드레일 및 교량난간 녹색제품 설치

추진계획

❍ 실시 설계시 녹색제품 반영    : ’17. 1 ~ 6월

❍ 공사단계 녹색제품 설치      : ’17. 6 ~ 12월

기대효과

❍ 차량방호시설의 일률적인 색상을 탈피한 녹색제품 설치로 녹색

산청 실현

❍ 녹색산청, 관광산청 이미지 제고

2. 산청군 수자원 확보 사업 추진

❖ 천혜의 관광자원이며 생활 및 농업 용수원으로 이용되는 경호강

갈수기 시 수원 고갈로 지역민이 어려움을 겪고 있어 수자원을

확보하여,

❖ 쾌적한 수변 공간 및 관광자원 확보하고 안정된 영농기반을 조성코자 함

추진방향

❍ 수자원 확보 사업 성격에 따라 관련부처 사업 건의 추진

- 다목적용수(국토교통부), 생활용수(환경부), 농촌용수(농축식품부)

❍ 사업대상지의 여건과 주민의 호응도에 따라 1~2지구 우선 추진

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 관내 일원

❍ 사 업 량 : 16개소(증설 2개소, 신규 14개소), 소수력 발전시설 16개소

❍ 사 업 비 : 8,359억원 정도(조성비 8,039, 소수력 발전 320)

추진계획

❍ 우리군 농촌수자원 확보 예비계획(안) 수립 :  ‘15. 08월

❍ 경상남도 건의 및 군의회 행정 간담회 : ‘15. 09월

❍ 국토교통부 및 관련부처 건의 : ‘15. 09월 ~

❍ 대상지 현장조사 실시(수자원공사) : ’15. 09 ~ ‘16. 09월

❍ 주민의견 수렴 및 댐건설 신청(국토교통부) : ’16. 10월 ~ 12월

❍ 대상지 선정 및 댐건설장기계획 반영 : ’17. 12월

기대효과

❍ 가뭄, 집중호우 등 이상기후 대비 재해예방 및 생태계 보전

❍ 사전재해와 산불예방 및 갈수기 수자원확보로 쾌적한 정주기반조성

❍ 소수력 발전시설 설치로 신재생 에너지 공급(연간 27억원 정도)

❍ 저수지와 연계 수변개발로 전원주택지 정주여건 개선

❍ 수변공원 등 관광자원을 확충하여 주민소득증대 기여