상하수도사업소 소관

2017년도 주요업무계획

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	5

Ⅳ. 2017년 주요업무계획	6

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업	11

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위 : 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
20		1	5	3	3		8

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
관리담당 (13명)	◦ 상수원 보호구역 관리 ◦ 지방상수도 원･정수 수질관리 ◦ 상수도 취･정수장 및 가압장, 배수지 관리 ◦ 상수도 대행업체 및 소규모 수도시설 및 수질관리 ◦ 먹는물공동시설(약수터) 시설 및 수질관리 ◦ 저수조(물탱크) 관리 ◦ 상하수도 요금부과･징수 및 체납사용료 징수 ◦ 상수도특별회계 예산
상 수 도 담 당 (3명)	◦ 수도정비 기본계획 및 중･장기계획 수립 ◦ 상수도시설 확장 및 통ㆍ폐합사업 추진 ◦ 상수도 급수구역 확장공사 추진 ◦ 지방상수도 설치사업 추진 ◦ 노후관 교체(누수율 제고사업 포함) ◦ 소규모 수도시설 설치
하 수 도 담 당 (4명)	◦ 하수도정비 기본계획 수립 및 공공하수처리시설 운영 ◦ 공공 및 농촌마을 하수처리시설 설치·관리 ◦ 원인자부담금 부과･징수 ◦ 지하수 계측기 관리 및 하수도 요금관리 ◦ 수질개선특별회계 운영

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

맛있고 건강한 수돗물 공급을 위한 수질관리 강화

❍ 수질 가이드라인을 재설정하여 정수장 수질검사 기준 강화

❍ 우리집 수돗물 안심확인제 시행

❍ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 강화

소규모수도시설 관리 및 개보수 : 317개소 2,784백만원

❍ 배수지 청소 : 2회/년 100백만원

❍ 염소 소독필터기 교체 : 4회/년 64백만원

❍ 수질검사실시 : 분기, 반기/년 183백만원

❍ 마을상수도 및 소규모급수시설 유지 및 개보수 : 2,437백만원

지방상수도시설 확장 및 정비 : 6개소 7,389백만원

❍ 산청∙생초 지방상수도 통합 및 확장공사 : 3,300백만원

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사        : 1,143백만원

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사          :  429백만원

❍ 산청군 상수도관망 기술진단, 블록시스템 기본계획 및 실시

설계용역 : 457백만원

❍ 지방상수도 교체 및 확장사업 : 1,560백만원(8개지구)

❍ 노후상수관망 정비사업(’17년 시범사업) 확정

- 총사업비 : 21,147백만원(‘16년 예산 500백만원)

- 공사기간 : 2017. 1 ~ 2021. 12(5년)

하수처리시설 확충 및 하수관로 정비 : 12,453백만원

❍ 소이지구 공공하수처리시설 설치사업 : 1,610백만원

❍ 시천·단계지구 하수관로 정비사업 : 6,008백만원

❍ 오전지구 공공하수처리시설 설치사업 : 3,285백만원

❍ 공공하수처리시설 유지관리(48개소) : 1,550백만원

2. 과 제

중장기 발전계획 등 미래수요 적극 반영

❍ 지역발전을 저해하는 각종 규제의 선제적 대응

⇒ 수도 및 하수도정비기본계획 변경(’17. 12 준공)

⇒ 상수원보호구역 해제에 따른 용도지역 변경(’17. 6 준공)

❍ 안정적인 물 공급을 위한 청정한 상수원 관리

❍ 특정지역 인구 증가에 따른 급수시설 확대

급수지역 확대 및 공기를 단축하여 주민불편 해소

❍ 삼장·생비량지구 지방상수도 인입 조기 완공

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 조기 착공

❍ 지방상수도 산청급수구역 확대

지방상수도 유수율 제고 및 생산원가 절감 노력

❍ 누수탐사, 관망정비, 블록시스템 및 유지관리시스템 구축

❍ 정수장 및 노후관로 정비로 유수율 제고

원수고갈⦁재해 대비 비상급수대책 마련

❍ 계곡수 이용주민 불편해소를 위한 암반관정 개발 확대

❍ 소규모급수시설의 개보수 및 유지관리로 주민불편 최소화

❍ 깨끗한 수돗물 공급을 위한 관리 철저

⇒ 수질검사, 염소필터 교체, 배수지 청소 및 주변정비 등

하수도 시설확충 및 방류수질 강화

❍ 신천·오전지구 농촌마을 하수도 정비 조속 추진

❍ 공공하수처리시설 처리용량 증설

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
맑은 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 녹색산청 실현

⇑

	3대 역점시책
수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상 완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성

⇑

	역점시책별 이행과제
수도시설 관리철저로 수도행정 신뢰도 제고 ◦ 지방상수도 시설물 및 관로 정비 ◦ 소규모수도시설 및 먹는물공동시설(약수터) 관리 철저 ◦ 산청·생초지방상수도 통합 및 확장공사 완공에 따른 관리 철저 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상 ◦ 지방상수도 급수구역 확대 ◦ 지방상수도 정비사업 추진 ◦ 노후관망정비사업(국비 시범사업) ◦ 소규모수도시설 개보수 및 유지관리사업 추진 완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성 ◦ 공공하수처리시설 증설사업 추진 ◦ 농촌마을 하수도 및 하수관로 정비사업 확대 ◦ 공공하수처리시설 유지관리 철저

Ⅳ. 2017년도 주요업무계획

맑은 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 녹색산청 실현

수도시설관리 철저로 수도행정 신뢰 제고

깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상

완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성

역점 시책

1. 수도시설관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고

역점

시책

지방상수도 시설물 및 관로 정비

❍ 사 업 량 :지방상수도 3개소

❍ 사 업 비 : 1,078백만원

❍ 사업내용 : 시설물 보수, 누수탐사, 노후관 및 노후계량기 교체 등

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2017. 12.

소규모수도시설 및 먹는물공동시설(약수터) 관리 철저

❍ 사 업 량 : 314개소(소규모시설311, 약수터3)

❍ 사 업 비 : 354백만원

❍ 사업내용 : 배수지청소, 수질검사, 약수터 정비 등

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2017. 12.

산청·생초 지방상수도 통합 및 확장공사 완공에 따른 관리

❍ 기존의 산청·생초정수장 폐쇄 신청 및 시설물 활용 방안 모색

❍ 지방상수도 인입으로 인해 불필요한 소규모수도시설 관리

❍ 산청상수원보호구역 해제 및 용도지역 변경결정 용역 실시로      군민을 위한 행정실현

석대마을 배수지(물탱크) 등 설치사업 추진

❍ 사 업 량 : 배수지 2식, 상수관로교체, 가압장 설치 등

❍ 사 업 비 : 450백만원

❍ 사업내용 : 급수인구 증가에 따른 배수지 설치 등

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2017. 12.

2.. 깨끗하고 안전한 수돗물 공급으로 삶의 질 향상

역점

시책

지방상수도 급수구역 확대 추진

❍ 지방상수도가 공급되지 않는 마을에 지방상수도 공급 확장

- 생비량지구 지방상수도 인입공사

- 삼장지구 지방상수도 인입공사

- 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 (신규)

- 산청급수구역 지방상수도 확장사업(신규)

❍ 갈수기 원수 부족 및 수질악화 지역 군민의 생활불편 해소

지방상수도 정비사업 지속 추진

❍ 사 업 량 : 4개소

❍ 사 업 비 : 2,090백만원

❍ 사업내용 : 수도정비기본계획(변경) 수립 용역, 배수지 설치

관로교체 및 확장 등

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2017. 12.

노후상수관망 정비 시범사업 추진

❍ 사업위치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사 업 량 : 누수탐사·정비 168km, 관망정비 32.2km

블록시스템 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 사 업 비 : 3,172백만원(국비 1,586, 군비 1,586)

※ 총 사업비 : 21,147백만원(국비 50%, 지방비 50%)

❍ 사업기간 : 2016. 10. ∼ 2021. 12.

소규모수도시설 개량사업 추진

❍ 사 업 량 : 7개소

❍ 사 업 비 : 715백만원(국비 500, 군비 215)

❍ 사업내용 : 대체수원개발, 시설물(관로, 물탱크 등) 개량 등

❍ 사업기간 : 2017. 1.∼ 2017. 12.

마을상수도 개보수 및 유지관리사업 추진

❍ 사 업 량 : 개보수(19개소), 유지관리 1식 등

❍ 사 업 비 : 1,350백만원

❍ 사업내용 : 마을상수도 개보수 및 유지관리 등

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2017. 12.

3.완벽한 하수처리로 수질보전 및 쾌적한 환경조성 실현

역점

시책

공공하수처리시설 확충(증설)

❍ 사 업 량 : 하수처리장 증설 1개소

❍ 사 업 비 : 698백만원(국비 349, 기금 209, 도비 70, 군비 70)

※ 총사업비 4,341백만원(국비2,171, 기금 1,302, 도비434, 군비434)

❍ 사업내용 : 산청공공하수처리시설 1,000㎥/일 증설

(2,800㎥/일 ⇒3,800㎥/일)

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

농촌마을하수도 정비

❍ 사 업 량 : 하수처리장 2개소

❍ 사 업 비 : 4,608백만원(국비 3,225, 기금 829, 도비 277, 군비 277)

※ 총 사업비 : 14,894백만원(국비 10,426, 기금 2,680, 도비 894, 군비 894)

❍ 사업내용

- 신천지구 : 하수처리장 65㎥/일 하수관로 L=6.88Km

- 오전지구 : 하수처리장 130㎥/일 하수관로 L=12Km

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2019. 12.

하수관로정비

❍ 사 업 량 : 하수관로정비 2개소

❍ 사 업 비 : 250백만원

❍ 사업내용

- 내리지구 : 하수관로 L=0.5Km

- 원하정지구 : 하수관로 L=1.0Km

❍ 사업기간 : 2017. 1. ∼ 2017. 12.

공공하수처리시설 유지.관리

❍ 사 업 량 : 하수처리장 48개소

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(기금 671, 군비 829)

❍ 사업내용 : 공공하수 및 마을하수처리시설 유지.관리

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

Ⅴ. 주요 현안사업

생비량지구 지방상수도 인입공사

삼장지구 지방상수도 인입공사

단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

산청급수구역 지방상수도 확장사업

노후상수관망 정비사업

□ 석대마을 배수지(물탱크) 둥 설치사업

□ 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립 용역

□ 산청 공공하수처리시설 증설사업

□ 오전지구 농촌마을하수도 정비사업

신천지구 농촌마을하수도 정비사업

산청군하수도정비 기본계획(변경) 용역

1. 생비량지구 지방상수도 인입공사

❖ 생비량면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량

및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여

안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함.

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 가압장 4개소, 관로매설 77.1km 등

❍ 사 업 비 : 6,857백만원(국비 4,800, 군비 2,057)

※ 총사업비 : 13,951백만원(기투자 2,500, ‘17년 6,857, ‘18년이후 3,071)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 배수지, 관로 등 시공

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2019. 2

그간 추진사항

❍ 본공사 2차분 착공                    : ’16. 6월

❍ 본공사 1차분 준공                    : ’16. 8월

❍ 건설사업관리용역 1차분 착공          : ’16. 8월

추진계획

❍ 본공사 3차분 착공 및 준공            : ’17. 3 ~ 12월

❍ 건설사업관리용역 2차분 착공 및 준공  : ’17. 3 ~ 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

2. 삼장지구 지방상수도 인입공사

❖ 삼장면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량

및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여

안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함.

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 400톤, 가압장 1개소, 관로매설 29.7km 등

❍ 사 업 비 : 734백만원(국비 514, 군비 220)

※ 총 사업비 : 1,163백만원(기투자 429, ‘17년 734)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 배수지, 관로 등 시공

❍ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2019. 12

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 착공                : ’16. 3월

❍ 도로점용 등 관계기관 사전 협의   : ’16. 8월

추진계획

❍ 실시설계용역 준공예정            : ’16. 11월

❍ 총사업비 변경 협의               : ’16. 12월

- 관계기관 : 경남도 수질관리과, 낙동강유역청, 환경부 수도정책과

- 당초 1,163백만원 → 변경 실시설계시 공사금액

❍ 관렵법에 따른 인허가 협의       : ’17. 1월

❍ 사업발주 및 착공                : ’17. 2월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

3. 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

❖ 산청군 수도정비기본계획(변경)에 의거 지방상수도가 공급되지

않은 마을에 지방상수도를 공급하고 단성정수장 증설사업을 병행

추진하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 단성정수장 증설로 지방상수도 급수구역 확장

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면, 신안면, 신등면 일원

❍ 사 업 량 : 정수장 증설 Q=1,600톤/일(4,100톤/일→5,700톤/일)

관로매설 L=42km, 가압장 1식 등

❍ 사 업 비 : 715백만원(국비 500, 군비 215)

※ 총 사업비 : 19,360백만원(‘17년 715, ‘18년이후 18,645)

❍ 사업내용 : 정수장 증설 및 지방상수도 확장

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2020. 12

그간 추진사항

❍ 신규사업 예산신청                : ’16. 4월

❍ ‘17년 사업확정 및 예산가내시     : ’16. 9월

추진계획

❍ 실시설계용역 착공 및 준공        : ’17. 1 ~ 12월

❍ 관련법에 따른 인허가 협의        : ’18. 3월

❍ 사업발주 및 착공                 : ’18. 4월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

4. 산청급수구역 지방상수도 확장사업

❖ 산청·생초 통합 정수장 증설 사업 완료에 따라 수도정비기본계획에

의거 지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도 확장사업을

통하여 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍, 오부면, 생초면, 금서면 일원

❍ 사 업 량 : 관로매설 L=42km, 가압장 1식 등

❍ 사 업 비 : 429백만원(국비300, 군비129)

※ 총 사업비 : 10,000백만원(‘17년 429, ‘18년이후 9,571)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 관로매설 등

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2019. 12

그간 추진사항

❍ 신규사업 예산신청                : ’16. 4월

❍ ‘17년 사업확정 및 예산가내시      : ’16. 9월

추진계획

❍ 실시설계용역 착공 및 준공        : ’17. 1 ~ 12월

❍ 관렵법에 따른 인허가 협의        : ’18. 3월

❍ 사업발주 및 착공                 : ’18. 4월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

5. 노후상수관망 정비사업

❖ 노후상수관망 정비로 녹물 발생·이물질 유입예방 등 안전한

수돗물을 공급하고 누수 저감을 통한 유수율제고 향상 및 상수도 운영·관리의 선순환 구조를 구축하고자 함.

추진방향

❍ 노후상수관망 정비사업을 통한 유수율(62.6% →85%) 제고

❍ 누수량 감소로 수돗물 생산비용절감을 통한 경영수지개선

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사 업 량 : 관망정비 L=32.2km, 누수탐사·정비 L=168km

블록시스템 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 사 업 비 : 2,672 백만원(국비 1,586, 군비 1,086)

※ 총 사업비 : 21,147백만원(기투자 500, ‘17년 2,672, ‘18년이후 17,975)

❍ 사업내용 : 노후상수관망 정비, 블록시스템 구축 등

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2021. 12

그간 추진사항

❍ 지방상수도 현대화사업 지침 통보 및 예산신청  : ’16. 4월

❍ 지방상수도 현대화 선도사업 선정(환경부)       : ’16. 8월

❍ 위탁방침 결정 및 군의회 동의안 원안 가결     : ’16. 9월

추진계획

❍ 위∙수탁 협약체결                    : ’16. 10월

❍ 실시설계용역 착공 및 준공        : ’16. 11 ~ ’17.  4월

❍ 사업착공 및 준공                 : ’17. 5 ~ ’21. 12월

기대효과

❍ 매년 누수저감 및 수돗물 생산비용 절감

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

6.석대마을 배수지(물탱크) 등 설치사업

❖ 귀농.귀촌 인구의 유입으로 상수도 수요가 증가함에 따라 석대마을

지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급하고자함.

추진방향

❍ 배수지(물탱크) 추가설치, 가압장 증설 등으로 충분한 수원확보

❍ 상수도관로 교체를 통하여 유수율 제고

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 단성면 방목리 일원

❍ 사 업 량 : 배수지(물탱크) 2식, 감압변 1식, 기존가압장 증설

상수도관로 교체 1식(L=800m,D75mm) 등

❍ 사 업 비 : 450백만원(군비 450)

※ 총 사업비 : 600백만원(기투자 150, ‘17년 450)

❍ 사업내용 : 배수지 설치, 상수도관로 교체 등

추진계획

❍  실시설계용역 착공              : ’16. 10월

❍  실시설계용역 준공              : ’16. 11월

❍  용지 보상                      : ’16. 12월

❍  사업 착공 및 준공              : ’17. 01월~06월

기대효과

❍ 안정적인 물 공급으로 지역주민의 생활에 기여

❍ 수도행정의 신뢰성 제고

7. 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립용역

❖ 수도법 제4조에 의거 일반 수도를 적정하고 합리적으로 설치

관리하기 위해 10년마다 수도정비에 대한 종합적인 계획을 수립

하여 수돗물을 안정적으로 공급하여 공중위생 향상과 생활환경을 개선하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장 및 신규 수요반영 근거 마련

❍ 수도정비에 대한 종합적인 계획 수립으로 양질의 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 수도정비기본계획(변경) 수립 용역 1식

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(2017년 본예산 700, 1회 추경 800)

❍ 사업내용 : 수도법 제4조에 의거 10년마다 종합적인 계획 변경 수립

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2017. 12

그간 추진사항

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립         : ’08. 10월

❍ 수도정비기본계획(부분변경) 수립     : ’15. 10월

추진계획

❍ 실시설계용역 착공 및 준공          : ’17. 1 ~ 12월

❍ 수도정비기본계획(변경) 사전협의     : ’18. 2월

❍ 수도정비기본계획(변경) 승인예정     : ’18. 4월

기대효과

❍ 수도정비의 종합적인 계획수립으로 수도의 체계적인 운영·관리

8. 산청 공공하수처리시설 증설사업

❖ 산청 공공하수처리구역 확대 및 물 사용량 증가 등으로 하수량이

지속적으로 늘어날 것으로 예상됨에 따라 부족한 공공하수처리   시설의 용량을 증설하여 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민   보건향상에 기여코자 함.

추진방향

❍ 산청공공하수처리시설 증설사업을 통해 하수처리 증가량

사전 대비

사업개요

❍ 위   치 : 산청군 산청읍 옥산리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 증설 1,000㎥/일(2,800㎥/일→3,800㎥/)일

❍ 사 업 비 : 698백만원(국비 349, 기금 209, 도비 70, 군비 70)

※ 총 사업비 : 4,341백만원(기투자 2,016, ‘17년 698, ‘18년이후 1,627)

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2017. 12.

그간 추진사항

❍ 실시설계 착수 및 완료         : ’14. 12 ~ ’15. 9월

❍ 재원협의 완료                  : ’16. 9월

❍ 계약심사                      : ’16. 10월

추진계획

❍ 설치 인가                     : ’16. 10월

❍ 공사 착공                     : ’16. 11월

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

9. 오전지구 농촌마을하수도 정비사업

❖ 오부면 오전리 일원에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정

처리하여 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민보건향상에   기여코져 함.

추진방향

❍ 오전지구 하수도정비사업을 통해 쾌적한 주거환경 개선

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 130㎥/일, 하수관로 L=12km

❍ 사 업 비 : 4,179백만원(국비 2,925, 기금 752, 도비 251, 군비 251)

※ 총 사업비 : 7,464백만원(기투자 3,285, ‘17년 4,179)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2017. 12.

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획(부분)변경      : ’15. 4월

❍ 공법선정완료                  : ’15. 9월

❍ 실시설계용역 완료             : ’14. 12월 ~ ’15. 12월

❍ 설치인가 및 재원협의 완료     : ’16. 5월

❍ 1차분 사업 착공               : ’16. 7월

추진계획

❍ 1차분 사업 준공예정           : ’17. 7월

❍ 2차분 사업 착공 및 준공 예정  : ’17. 1월 ~ ’17. 12월

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

10. 신천지구 농촌마을하수도 정비사업

❖ 시천면 신천리 일원에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정

처리하여 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민보건향상에   기여코져 함.

추진방향

❍ 신천지구 하수도정비사업을 통해 쾌적한 주거환경 개선

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 신천리 일원

❍ 사 업 량  : 하수처리장 65㎥/일, 하수관로 L=6.88km

❍ 사 업 비 : 429백만원(국비 300, 기금 77, 도비 26, 군비 26)

※ 총 사업비 : 7,430백만원(‘17년 429, ‘18년이후 6,911)

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.

그간 추진사항

❍ 신규사업 예산신청                  : ’16. 3월

❍ 사업확정 및 예산 가내시            : ’16. 9월

추진계획

❍ 실시설계 완료                      : ’17. 2월

❍ 설치인가및재원협의등 행정절차 추진 : ’17. 3월 ~ 4월

❍ 계약심사                           : ’17. 4월

❍ 공사발주 및 착공                   : ’17. 5월.

❍ 공사준공                           : ’19. 12월

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

11. 산청군하수도정비 기본계획(변경) 용역

❖ 하수도법 제6조에 의거 하수도정비 기본계획은 20년을 단위로

계획을 수립하고, 5년마다 기본 계획의 타당성 여부를 검토   하여 변경계획을 수립토록 함

추진방향

❍ 산업단지 조성과 인구유입 등 공공하수처리구역 확장 및 신규

수요 반영 근거 마련

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 하수도정비기본계획(변경) 용역 1식

❍ 사 업 비 : 1,500백만원(2017년 본예산 700, 1회 추경 800)

❍ 사업내용 : 하수도처리구역 확대 등 신규수요 반영

❍ 사업기간 : 2017. 1∼2017. 12.

추진계획

❍ 용역설계                       : ’16. 12월

❍ 용역PQ심사 및 업체선정        : ’17. 1월 ~ 2월

❍ 입찰공고 및 계약체결           : ’17. 3월

❍ 용역 착수                      : ’17. 4월

❍ 용역 준공                      : ’17. 12월

기대효과

❍ 하수정비의 종합적인 계획수립으로 하수도의 체계적 운영·관리