상하수도사업소

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	4

Ⅳ. 2018 주요업무계획	5

Ⅴ. 주요 현안사업	10

Ⅵ. 신규(특수) 시책	23

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위 : 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
22		1	6	4	2		9

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
관리담당 (14명)	◦ 상수도특별회계 운영 ◦ 상수원 보호구역 관리 ◦ 지방상수도 시설물 및 원･정수 수질관리 ◦ 지방상수도 급․배수 및 누수관리 ◦ 상수도 대행업체 및 급수공사 관리 ◦ 상수도 요금 및 급수민원 접수․처리 ◦ 상하수도 요금부과･징수 및 체납사용료 관리 ◦ 저수조(물탱크) 청소업체 및 저수조 관리 ◦ 절수설비 및 냉․온수기 관리 ◦ 소규모 수도시설 원･정수 수질관리 ◦ 먹는물 공동시설(약수터) 시설 및 수질관리
상수도담당 (3명)	◦ 수도정비 기본계획 및 중･장기계획 수립 ◦ 상수도시설 확장 및 통ㆍ폐합사업 추진 ◦ 상수도 급수구역 확장사업 추진 ◦ 지방상수도 설치사업 추진 ◦ 노후관 교체사업 추진(누수율 제고사업 포함) ◦ 소규모 수도시설 설치 및 관리
하수도담당 (4명)	◦ 하수도 정비 기본계획 및 공공하수처리시설 운영･관리 ◦ 공공하수도 시설관리 ◦ 원인자부담금 부과･징수 ◦ 하수관로 정비사업 추진 ◦ 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수처리장 확충사업 추진 ◦ 배수설비설치 신고 및 준공 ◦ 수질개선특별회계 예산관리 및 운영

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 원․정수 수질검사(지방상수도, 소규모 수도시설) : 227백만원

❍ 배수지(물탱크) 청소(지방상수도, 소규모 수도시설) : 129백만원

❍ 소규모 수도시설 소독관리 : 70백만원

❍ 지하수 중 자연방사선물질 제거장치 설치 : 34백만원

❍ 수도시설 기술진단 용역(시천,단성상수도) : 52백만원

❍ 노후 산청․생초상수도 폐지, 신설 통합상수도 급수개시 : 2017.1

안정적인 수돗물 공급을 위한 기반 조성 및 유지관리

〈 지방상수도시설 확장 및 정비 〉5건 9,233백만원

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 : 1,204백만원

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사 : 300백만원

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 : 2,857백만원

❍ 노후상수관망 정비사업 : 3,172백만원

❍ 지방상수도 확장사업 : 1,700백만원

〈 소규모 수도시설 개보수〉1건 3,608백만원

❍ 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지 및 개보수 : 3,608백만원

하수처리 기반 확충 및 유지관리 : 14,372백만원

❍ 소이지구 공공하수처리시설 설치사업 : 614백만원

❍ 시천·단계지구 하수관로 정비사업 : 2,200백만원

❍ 오전지구 공공하수처리시설 설치사업 : 4,958백만원

❍ 산청 공공하수처리시설 증설사업 : 2,800백만원

❍ 공공하수처리시설 유지관리 및 보수(48개소) : 3,800백만원

2. 과  제

지방상수도 유수율 제고 및 생산원가 절감 노력

❍ 정수장 및 노후관망 정비를 통하여 유수율 제고

❍ 누수탐사, 관망정비, 블록시스템 및 유지관리시스템 구축과 관리인력 확보

❍ 급수구역 확장, 시설증설 등 생산원가 상승 년차별 요금현실화

중장기 발전계획 등 미래수요 적극 대응

❍ 수도 및 하수도정비 기본계획(변경)을 통해 장래계획을 반영 발전

저해 요인 사전제거 등 선제적 대응

❍ 시천상수도 구곡천 계곡수 수량부족으로 비상 수원인 하천수 취수로

대체수원 확보 필요

(하천수 취수시 상수원보호구역 지정요구의 문제점이 있음)

급수지역 확대 및 공기 단축으로 주민불편 해소

❍ 수량부족과 수질불량 삼장·생비량지구 지방상수도 인입 조기 완공

❍ 용량부족과 처리효율 저하된 단성상수도 증설 및 확장사업 조기 착공

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장사업 조기착공

원수고갈⦁재해 대비 비상급수대책 마련

❍ 안전한 수돗물 공급을 위한 미급수구역 지방상수도 급수구역 편입확대

❍ 수질관리가 취약한 계곡수 이용시설 지하수(암반관정) 개발 확대

하수도 시설확충 및 방류수질 강화

❍ 신천·오전지구 농촌마을 하수도 정비 조속 추진

❍ 공공하수처리시설 처리용량의 증설

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
양질의 물공급과 깨끗한 수환경 조성으로 녹색산청 실현

⇑

	3대 역점시책
수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상 완벽한 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성

⇑

	역점시책별 이행과제
수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고 ◦ 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 추진 ◦ 노후관망 정비사업 추진으로 안정적인 수량 확보 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상 ◦ 지방상수도 급수구역 확장 및 증설사업 추진 ◦ 지방상수도 정비사업 지속추진 ◦ 소규모 수도시설 개량사업 추진 완벽한 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성 ◦ 공공하수처리시설 확충(증설) 및 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수도 시설물 정비 및 유지관리 추진

Ⅳ. 2018년도 주요업무계획

양질의 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 녹색산청 실현

수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰 제고

안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상

완벽한 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성

역점 시책

1. 수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고

역점

시책

안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 지방상수도 및 소규모 수도시설 원․정수 수질관리 : 198백만원

- 지방상수도 원․정수 수질관리 : 38백만원

- 소규모 수도시설 원․정수 수질관리 : 160백만원

❍ 지방상수도 및 소규모 수도시설 배수지(물탱크) 내부청소 : 135백만원

❍ 유량계 검교정 및 수질 자동측정기 정도검사 : 32백만원

❍ 소규모 수도시설 소독시설 유지관리 : 130백만원

❍ 시천상수도 시설물 개선 및 정비사업 : 364백만원(군비 364)

❍ 단성상수도 시설물 개선사업 : 38백만원(군비 38백만원)

노후관망 정비사업 추진으로 안정적인 수량 확보

❍ 총사업비 21,147백만원(기투자 3,172 ‘19년도 이후 14,803)

- 2018년도 사업 3,172백만원(국비 1,586,  군비 1,586)

❍ 사업내용

- 관망정비 32.2km

- 누수탐사 및 정비 168km

- 블록시스템, 유지관리 시스템 구축

2. 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상

역점

시책

지방상수도 급수구역 확장 및 증설사업 추진

❍ 생비량, 삼장지구 지방상수도 인입공사

- 생비량 지구 : 총사업비 13,951백만원(기투자 10,881,‘19년이후 1,866)

․ 2018년도 : 1,204백만원(국비 1,000, 군비 204)

※ 배수지 300톤, 가압장 4개소, 관로매설 77.1km

- 삼장지구 : 총사업비 6,863백만원(1지구 1,163, 2지구 5,700)

․ 2018년도 : 300백만원(국비 210, 군비 90)

※ 배수지 400톤, 가압장 1개소, 관로매설 34.5km

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

: 총사업비 19,360백만원(‘17년 715, ’19년이후 15,788)

- 2018년도 : 2,857백만원 (국비 2,000, 군비 857)

※ 정수장증설 1,600톤/일(4,100㎥/일⇒5,700㎥/일), 가압장 1개소,

관로매설42km

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장사업 : 총사업비 10,000백만원

(‘17년 429, ’19년이후 8,285)

- 2018년도 : 1,286백만원(국비 900, 군비 386)

※ 가압장 4개소, 관로매설 42km

지방상수도 정비사업 지속추진

❍ 산청군 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역

: 총사업비 1,150백만원(2017년 700백만원)

- 2018년도 : 450백만원 (군비 450)

❍ 신안 중촌배수지 증설사업 : 700백만원(군비 700)

※ 배수지 증설 V=1,000톤

소규모 수도시설 개량사업 추진

❍ 소규모 수도시설 개량사업 : 1,000백만원(국비 700, 군비 300)

※ 노후관로교체, 시설물(관정, 물탱크 등) 개량

❍ 소규모 수도시설 개보수 및 유지관리 : 2,908백만원(군비 2,908)

※ 개보수(28개소), 유지관리 1식

3. 완벽한 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성

역점

시책

공공 하수처리시설 확충(증설) 및 정비

❍ 산청 공공하수처리시설 증설사업 : 총사업비 4,341백만원

(국비 2,171, 기금 1,302, 도비 434, 군비 434)

- 2018년도 1,248백만원(국비 814,기금 209, 도비 163, 군비 62)

※ 하수처리장증설 1,000㎥/일(2,800㎥/일⇒3,800㎥/일)

❍ 오전, 신천지구 농촌마을 하수도 정비사업

- 오전지구 하수도 정비사업 : 총사업비 7,464백만원(국비 5,225,

기금 1,343, 도비 448, 군비 448)

※ 하수처리장 130㎥/일, 하수관로 L = 12.0km

- 신천지구 하수도 정비사업 : 총사업비 7,430백만원(국비5,201, 기금 1,337, 도비 446, 군비 446)

․ 2018년도 : 2,800백만원(국비 1,960, 기금 504, 도비 168, 군비 168)

※ 하수처리장 90㎥/일, 하수관로 L = 8.6km

하수도 시설물 정비 및 유지관리

❍ 하수도준설 및 유지보수 : 150백만원(군비 150)

❍ 소규모 하수도시설 수선유지 및 긴급보수 : 250백만원(군비 250)

❍ 산청군 하수도정비 기본계획(변경) 용역 : 총사업비 883백만원(군비 883)

- 2018년도 : 183백만원(군비 183)

Ⅴ. 주요 현안사업

안심하고 마실수 있는 수돗물 공급추진

생비량지구 지방상수도 인입공사

□ 삼장지구 지방상수도 인입공사

단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

산청급수구역 지방상수도 확장사업

□ 신안 중촌 배수지 증설사업

□ 노후 상수관망 정비사업

□ 산청군 수도정비 기본계획(변경) 수립 용역

□ 산청 공공하수처리시설 증설사업

오전지구 농촌마을하수도 정비사업

신천지구 농촌마을하수도 정비사업

산청군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

1. 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 추진

수질 및 수량관리와 시설개선 등을 통하여 보다 나은 서비스를 제공 함으로서 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급에 기여코자함

추진방향

❍ 지방상수도 누수저감 및 유수율 향상을 위한 노력을 확대

❍ 수질관리가 취약한 소규모 수도시설에 대한 관리강화

사업개요

분야	공종		사업비(백만원)	비고
계			1,626
지방상수도	원․정수 수질검사(3개 상수도)		38
	시천상수도 취수원 개선외 3건		321
	관로 기술진단(신안,단성)		60
	지방상수도 정밀진단(시천,단성)		50
	계량기 교체 및 신설(급수구역 전역)		102
	급․배수관 수선(급수구역 전역)		540
	배수지 및 침전지 내부청소(3개 상수도)		48
	수질자동 측정기 및 원거리 배수지 전동밸브 설치		90
소규모 수도시설	원정수 수질검사(300개소)		160
	소독기 유지관리	필터교체 및 약품보충(300개소)	66
		투입기 교체(70개소)	64
	배수지(물탱크) 내부청소(300개소)		87

추진계획

❍ 정비 및 개선사업 착공 : ’18. 2월

❍ 준공 : ’18. 8월

기대효과

❍ 수질 및 수량관리와 시설개선 등을 통해 수돗물에 대한 신뢰도

제고와 대민 서비스 향상에 기여

2. 생비량지구 지방상수도 인입공사

생비량면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량 및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상 및 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 가압장 4개소, 관로매설 77.1km 등

❍ 사 업 비 : 1,204백만원(국비 1,000, 군비 204)

※ 총사업비 : 13,951백만원(기투자 10,881, ‘19년이후 1,866)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 배수지, 관로 등 시공

❍ 사업기간 : 2014. 1 ~ 2019. 2

그간 추진사항

❍ 본공사 3차분 착공 : ’17. 1월

❍ 건설사업 관리용역 1차분 준공 및 2차분 착공 : ’17. 3월

추진계획

❍ 본공사 4차분 착공 : ’18. 1월

❍ 건설사업관리용역 2차분 준공 및 3차분 착공 : ’18. 6월

❍ 본공사 3차분 준공 : ’18. 7월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

3. 삼장지구 지방상수도 인입공사

삼장면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량 및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 400톤, 가압장 1개소, 관로매설 34.5km 등

❍ 사 업 비 : 300백만원(국비 210, 군비 90)

※ 총사업비 : 6,863백만원(1지구 1,163, 2지구 5,700)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 배수지, 관로 등 시공

❍ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2020. 12(1지구 2016~2017, 2지구 2018~2020)

그간 추진사항

❍ 총사업비 변경 협의 요청 : ’16. 12월

❍ 2018년 지특회계 신규사업 신청(2지구) : ’17. 3월

❍ 2018년 지특회계 인센티브 선정(2지구) : ’17. 9월

추진계획

❍ 실시설계용역(2지구) 착공 : ’18. 1월

❍ 관련법에 따른 인․허가 협의 : ’18. 3월

❍ 1지구 준공 및 2지구 공사 발주 : ’18. 5월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

4. 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

산청군 수도정비기본계획(변경)에 따라 지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도를 공급하고 단성정수장 증설사업을 병행 추진하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 단성정수장 증설로 지방상수도 급수구역 확장

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면, 신안면, 신등면 일원

❍ 사 업 량 : 정수장 증설 Q=1,600톤/일(4,100톤/일→5,700톤/일)

관로매설 L=42km, 가압장 1식 등

❍ 사 업 비 : 2,857백만원(국비 2,000, 군비 857)

※ 총 사업비 : 19,360백만원(‘17년 715, ‘19년이후 15,788)

❍ 사업내용 : 정수장 증설 및 지방상수도 확장

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2020. 12

그간 추진사항

❍ 기본 및 실시설계용역 착수 : ’17. 5월

추진계획

❍ 기본 및 실시설계용역 2차분 착공 : ’18. 1월

❍ 기본 및 실시설계용역 완료 : ’18. 6월

❍ 사업 발주 및 착공 : ’18. 7월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

5. 산청급수구역 지방상수도 확장사업

산청·생초 통합 정수장 증설 사업 완료에 따라 수도정비기본계획에

의거 지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도 확장사업을 통하여 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍, 오부면, 생초면, 금서면 일원

❍ 사 업 량 : 관로매설 L=42km, 가압장 4개소 등

❍ 사 업 비 : 1,286백만원(국비 900, 군비 386)

※ 총 사업비 : 10,000백만원(‘17년 429, ‘19년이후 8,285)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 관로매설 등

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2019. 12

그간 추진사항

❍ 기본 및 실시설계용역 착공 : ’17. 5월

추진계획

❍ 기본 및 실시설계용역 2차분 착공 : ’18. 1월

❍ 기본 및 실시설계용역 준공 : ’18. 6월

❍ 사업 발주 및 착공 : ’18. 7월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

6. 신안 중촌배수지 증설사업

생비량면 등 급수구역의 확장으로 기존 배수지 용량이 부족해짐에 따라 증설하여 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 수돗물을 공급하고자 함

추진방향

❍ 배수지(물탱크) 증설, 가압장 정비 등으로 충분한 수원확보

❍ 안정적 배수용량 확보로 지역 간 주민갈등 해소

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 중촌리 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 증설 V=1,000톤

❍ 사 업 비 : 700백만원(군비 700)

❍ 사업내용 : 배수지 증설, 가압장 정비, 주변 토목공사 등

❍ 사업기간 : 2018. 1 ~ 2018. 12

추진계획

❍ 실시설계용역 착공 : ’18. 1월

❍ 실시설계용역 준공 : ’18. 3월

❍ 관련 인․허가 협의 및 편입 토지 보상 : ’18. 4월

❍ 공사 발주 및 착공 : ’18. 5월

기대효과

❍ 안정적인 물 공급으로 지역주민의 생활에 기여

❍ 수도행정의 신뢰성 제고

7. 노후 상수관망 정비사업

노후상수관망 정비로 녹물 발생·이물질 유입예방 등 안전한 수돗물을 공급하고 누수 저감을 통한 유수율제고 향상 및 상수도 운영·관리의 선순환 구조를 구축하고자 함

추진방향

❍ 노후상수관망 정비사업을 통한 유수율(62.6% →85%) 제고

❍ 누수량 감소로 수돗물 생산비용 절감을 통한 경영수지개선

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사 업 량 : 관망정비 L=32.2km, 누수탐사·정비 L=168km

블록시스템 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 사 업 비 : 3,172 백만원(국비 1,586, 군비 1,586)

※ 총사업비 : 21,147백만원(기투자 3,172, ‘19년이후 14,803)

❍ 사업내용 : 노후상수관망 정비, 블록시스템 구축 등

❍ 사업기간 : 2016. 10 ~ 2021. 12

※ 한국환경공단 일괄위탁 시행

그간 추진사항

❍ 상수도관망 기술진단 용역 공동 설계관리로 변경 : ’17. 3월

❍ 기본설계 자문회의 : ’17. 7월

❍ 기본설계 용역 준공 및 실시설계 용역 착공 : ’17. 9~11월

추진계획

❍ 누수 탐사 및 복구공사 착공 : ’18. 1월

❍ 블록 및 유지관리시스템 구축공사 착공 : ’18. 4월

❍ 관망 종합 정비공사 착공 : ’19. 3월

기대효과

❍ 매년 누수저감 및 수돗물 생산비용 절감

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

8. 산청군 수도정비 기본계획(변경) 수립용역

수도법 제4조에 의거 일반 수도를 적정하고 합리적으로 설치 관리하기 위해 10년마다 수도정비에 대한 종합적인 계획을 수립 수돗물을 안정적으로 공급코자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장 및 신규 수요반영 근거 마련

❍ 수도정비에 대한 종합적인 계획 수립으로 양질의 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 수도정비기본계획(변경) 수립 용역 1식

❍ 사 업 비 : 450백만원(군비 450)

※ 총사업비 : 1,150백만원(2017년 700백만원)

❍ 사업내용 : 수도법 제4조에 의거 10년마다 종합적인 계획 변경 수립

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2018. 6

그간 추진사항

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립 : ’08. 10월

❍ 수도정비기본계획(부분변경) 수립 : ’15. 10월

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립 용역 착공 : ’17.  5월

추진계획

❍ 수도정비기본계획(변경) 사전협의 : ’18. 2월

❍ 수도정비기본계획(변경) 승인예정 : ’18. 5월

❍ 용역 준공 : ’18. 6월

기대효과

❍ 수도정비의 종합적인 계획수립으로 수도의 체계적인 운영·관리

9. 산청 공공하수처리시설 증설사업

하수처리구역 확대 및 산업단지 조성 등으로 하수량이 지속적으로 늘어남에 따라 부족한 공공하수처리시설의 용량을 증설 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민 보건향상에 기여코자 함

추진방향

❍ 산청공공하수처리시설 증설사업을 통해 하수처리 증가량 사전 대비

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 산청읍 옥산리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 증설 1,000㎥/일(2,800㎥/일→3,800㎥/)

❍ 사 업 비 : 4,341백만원(국비 2,171, 기금 1,302, 도비 434, 군비 434)

⇒ 2018년도 : 1,248백만원(국비 814, 기금 209, 도비 163, 군비 62)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 8.

그간 추진사항

❍ 실시설계 완료 : ’15.  9월

❍ 설치인가 및 재원협의 완료 : ’16.  9월

❍ 계약심사 : ’16. 10월

❍ 공사 발주 및 착공 : ’16. 11월

추진계획

❍ 공사 준공 : ’18.  8월

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

10. 오전지구 농촌마을하수도 정비사업

오부면 오전리 일원에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민보건향상에 기여코자 함

추진방향

❍ 오전지구 하수도정비사업을 통해 쾌적한 주거환경 개선

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리장 130㎥/일, 하수관로 L=12.0km

❍ 사 업 비 : 7,464백만원(국비 5,225 기금 1,343, 도비 448, 군비 448)

❍ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2018. 7.

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 완료 : ’14. 12월 ~ ’15. 12월

❍ 설치인가 및 재원협의 완료 : ’16.  5월

❍ 1차분 사업 착공 : ’16.  7월

❍ 1차분 사업 준공 : ’17.  9월

❍ 2차분 사업 착공 : ’17.  3월

추진계획

❍ 2차분 사업 준공 예정 :  ’18. 07월

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

11. 신천지구 농촌마을하수도 정비사업

시천면 신천리 일원에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민보건향상에 기여코자 함

추진방향

❍ 신천지구 하수도정비사업을 통해 쾌적한 주거환경 개선

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 신천리 일원

❍ 사 업 량  : 하수처리장 90㎥/일, 하수관로 L=8.6km

❍ 사 업 비 : 7,430백만원(국비 5,201, 기금 1,337, 도비 446, 군비 446)

⇒ 2018년도 : 2,800백만원(국비 1,960, 기금 504, 도비 168, 군비 168)

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획(부분)변경 : ’17.  9월

❍ 공법선정완료 : ’17.  10월

❍ 설치인가 및 재원협의 : ’17.  11월

❍ 실시설계 및 계약심사 완료 : ’17.  12월

추진계획

❍ 공사발주 및 착공 예정 : ’18.   1월

❍ 공사 준공 예정 : ’19.  12월

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

12. 산청군 하수도정비 기본계획(변경) 용역

하수도법 제6조에 의거 하수도정비 기본계획은 20년을 단위로 계획을 수립하고, 5년마다 기본 계획의 타당성 여부를 검토하여 변경 계획을 수립토록 함

추진방향

❍ 산업단지 조성과 인구유입 등 공공하수처리구역 확장 및 신규

수요 반영 근거 마련

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 하수도정비기본계획(변경) 용역 1식

❍ 사 업 비 : 883백만원(군비 883)

❍ 사업내용 : 하수도처리구역 확대 등 신규수요 반영

❍ 사업기간 : 2017. 1∼2018. 5.

그간 추진사항

❍ 입찰공고 및 계약체결 :  ’17. 4월

❍ 용역 착수 :  ’17. 5월

추진계획

❍ 용역 준공 예정 : ’18.  5월

기대효과

❍ 하수정비의 종합적인 계획수립으로 하수도의 체계적 운영·관리

Ⅵ. 특수(신규)시책

동의보감촌 하수도 요금 부과

상하수도 요금 수납체계 개선

1. 동의보감촌 하수도 요금 부과

동의보감촌내 상수도 과다 사용으로 물 부족과 하수량이 증가되어 물 절약를 유도하고 하수 유입률 저감을 위해 하수도 요금 부과 필요

추진방향

❍ 동의보감촌내 상수도 계량기 설치

❍ 상수도계량기 사용량을 기준으로 산정하여 하수도 요금 부과

시책개요

❍ 위    치 : 금서면 특리 동의보감촌내

❍ 대    상 : 동의보감촌내 군 하수관로에 유입하는 건물 전체

❍ 사업내용 : 상수도를 사용하는 모든 건물에 상수도 계량기를 설치

후 상수도 사용량을 기준으로 하수량을 산정 요금 부과

추진계획

❍ 상수도계량기 설치 완료 : ’17. 12.

❍ 하수도 요금 부과 : ’18. 01.

기대효과

❍ 하수도 요금부과로 상수도 사용량 감소와 세외수입 증대에 기여

❍ 하수량 감소로 하수도시설의 유지관리에 원활 기여

2. 상․하수도 요금 수납체계 개선

❖ 상․하수도 요금 자동이체가 농협은행에 한정되어 있고,

❖ 수용가별 가상계좌가 없어 요금납부 불편으로 이를 개선코자함

추진방향

❍ 전국 어디서나 전 금융기관에서 자동이체가 가능토록 하고

❍ 수용가별 가상계좌를 부여 요금 수납에 따른 불편함을 해소

그간 추진형태

❍ 자녀들이 자동이체를 신청하는 경우가 많으나 농협은행외 자동이체

신청을 제한하고 있어 요금 납부에 불편

❍ 고지서 분실 등으로 계좌이체 문의 시 가상계좌가 없어 세입․세출

외 현금 계좌로 이체 후 다시 인출, 수납 처리하는 불편이 있음

추진계획

❍ 자동이체 확대 및 가상계좌 부여 관련예산 확보 : '17. 12.

❍ 금융결재원과 자동이체 위․수탁 계약체결 : '17. 12.

❍ 가상계좌 시스템 구축 및 가상계좌 부여 위․수탁 계약체결 : '18. 01.

❍ 자동이체 금융기관 확대 및 가상계좌 생성 시행 : '18. 01.

기대효과

❍ 수납 금융기관 자동이체 신청 확대로 자동 이체율 향상

❍ 수용가별 가상계좌를 생성 부여로 체납요금 저감에 기여