11

주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

우리 산청군에서 ‘14년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
지방도1026호선(오부선돌재)굴곡도로 개량사업	3,160	2,400	200	560	2015년	2008년	80%
남사전통한옥마을 조성사업	9,704	5,332	1,000	3,372	2016년	2008년	65%
산청.생초정수장 통합및시설확장사업	29,717	14,610	5,316	9,791	2016년	2008년	65%
산청한방의료 클러스터사업	43,100	28,117	1,200	13,783	2016년	2009년	90%
수월~소둔철간 도로 확포장공사	4,600	500	2,100	2,000	2015년	2010년	50%
산청시천생활체육공원 조성사업	5,000	1,320	1,830	1,850	2015년	2010년	60%
제보-상능간도로확포장공사	3,600	1,400	150	2,050	2018년	2010년	50%
내수-매곡간도로확포장공사	4,782	550	1,800	2,432	2016년	2010년	30%
산청친환경유기 한우육성사업	3,000	1,600	1,400	-	2014년	2011년	100%
한방휴양체험특화도시조성사업	5,000	3,700	500	800	2015년	2011년	85%
산청농어촌테마 공원조성사업	8,000	5,200	2,700	100	2015년	2011년	87%
신안면소재지 종합정비사업	7,000	956	3,031	3,013	2016년	2012년	70%
산청한방약초힐링타운육성사업	3,000	532	1,438	1,030	2015년	2012년	66%
공무원임대 아파트 매입	20,486	10,109	9,498	879	2014년	2012년	95%
내리지구하수관거 정비사업	3,575	1,019	2,556	-	2014년	2012년	완료
산청하수관거 개보수사업	5,330	1,039	1,598	2,693	2014년	2012년	70%

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지진척율(%)
산청버스 정류소 확충사업	2,450	995	704	751	2015년	2013년	95%
산청 토종홍화의 고부가가치화 사업	3,000	-	1,111	1,889	2017년	2013년	37%
지리산산청곶감 명품화사업	4,800	-	300	4,500	2016년	2013년	10%
산청따라하동길 조성사업	2,270	1,169	756	345	2015년	2013년	65%
단성면소재지 종합정비사업	6,500	-	669	5,831	2017년	2013년	30%
생비량지구지방 상수도 인입공사	8,180	1,523	2,357	4,300	2017년	2013년	10%
종합 노인․장애인 복지관 건립사업	4,644	-	356	4,288	2016년	2013년	10%
한방항노화 산업단지 진입로 연결로조성사업	5,100	-	2,000	3,100	2016년	2014년	60%
시천․단계지구 하수관로 정비사업	9,296	-	429	8,867	2016년	2014년	15%

‣ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여    2014년에 추진한 사업

11-1-1. 개별 투융자심사 사업의 추진현황 : [별지4] 참조

11-2. 지방채 발행사업 : 해당없음

11-3. 민간투자사업 : 해당없음