[별지4]

개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명

지방도1026호선(오부선돌재)

굴곡도로개량사업

담당자

건설과 이창훈(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 오부면 내곡리 지방도1026호선의 도로굴곡이 심하고 경사가 급하여 교통사고       위험이 많으며, 특히 겨울철 도로결빙으로 교통두절이 잦아 굴곡도로를 개량코자 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2008년 01월 ~ 2015년 12월

○ 위    치 : 산청군 오부면 내곡리

○ 규    모 : 굴곡도로개량 L=3.2km, B=9.5m

○ 총사업비 : 3,160백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,160	2,400	200	560
국 비
시 도 비	2,700	2,100	200	400
시군구비	460	300		160
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2010년 6월 : 1공구 준공(L=0.16km)

○ 2013년 1월 : 2공구 준공(L=0.34km)

○ 2015년 8월 : 3공구 준공(L=0.45km)

□ 향후계획

○ 2016년 1월 : 3공구 완료 후 잔여구간(L=2.25km)에 대하여 경상남도 사업시행 건의

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초(2,220백만원), 변경(3,160백만원)

사업명

남사전통한옥체험마을조성사업

담당자

문화관광과 김병찬(☎970-6432)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통한옥마을로서 가치를 지니고 있고 지역주민의 관광개발 의지가 높은 남사       마을을 복합형 전통한옥문화촌으로 정비하여 전통문화와 농촌체험공간으로 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009년 ~ 2016년

○ 위    치 : 산청군 단성면 남사리 일원(남사예담촌)

○ 규    모 : 전통한옥체험마을 조성 A=82,000㎡

○ 총사업비 : 9,704백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,704	5,332	1,000	-	3,372
국 비	4,794	2,789	500	-	1,505
시 도 비	1,438	778	150	-	510
시군구비	3,472	1,765	350	-	1,357
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 이벤트장 조성사업 추진(공정율 85%)

○ 전력간선지중화사업 추진(공정율 95%)

○ 노후한옥정비사업 추진(공정율 20%)

□ 향후계획

○ 이벤트장 조성사업Ⅱ 시행

○ 산책로 등 조성 시행

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경

- 당초 : 2009년~2014년(6년),  - 변경 : 2009년~2016년(8년)

사업명

산청·생초 지방상수도 통합 및 확장공사

담당자

상하수도사업소 김진경(☎ 970-7012)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존 정수장 시설의 노후화 및 시설용량 한계도달 문제로 분산된 상수도의 통합

및 증설로 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 지방상수도를 공급하는데 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 12월 ~ 2016년 12월

○ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

○ 규    모 : 취·정수시설 5,500톤/일 증설, 관로매설 L=24.7km

건축 및 전기설비 1식 등

○ 총사업비 : 29,717백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	29,717	14,610	5,316	6,491	3,300
국 비	16,824	8,532	1,690	3,700	2,902
시 도 비	1,000	-	1,000	-	-
시군구비	11,893	6,078	2,626	2,791	398
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2014년 06월 ~ 현재 : 본공사 4차분 착공 및 추진중

○ 2015년 03월 ~ 현재 : 전면책임감리용역 3차분 착공 및 추진중

○ 2015년 07월 ~ 현재 : 프로세스제어설비 구매설치 착공 및 추진중

□ 향후계획

○ 2015년 08월 : 본공사 5차분 및 전기공사 2차분 착공

○ 2015년 12월 : 본공사 4차분 준공

○ 2016년 01월 : 본공사 6차분 착공

○ 2016년 06월 : 전면책임감리용역 3차분 준공 및 4차분 착공

○ 2016년 06월 : 본공사 5차분 준공

○ 2016년 06월 이후 : 정수장 시운전 및 문제점 보완

○ 2016년 12월 : 전체준공 및 상수도 급수

사업명

산청한방의료클러스터사업

담당자

항노화산업과 윤경미(☎ 970-7703)

□ 사업목적 및 필요성

○ 풍부한 약초자원과 허준 선생 등 명의가 활동한 한의학의 고장으로서의 한방

의료클러스터 기반마련으로 산청군의 브랜드 가치 제고 및 지역경제활성화 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2009년 ~ 2016년(8년간)

○ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 일원

(약초산업지원사업, 한방의료복지센터, 한방약초밸리)

○ 규    모 : 281,930㎡

○ 총사업비 : 43,100백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	43,100	28,117	1,200	983	12,800
국 비	4,000	4,000
시 도 비	14,000	13,000	500	500
시군구비	13,300	11,117	700	483	1,000
지 방 채	2,300				2,300
민간자본	9,500				9,500
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 약초산업지원사업, 한방의료복지센터지구 기반 조성 완료

○ 임산물유통센터(2,860㎡), 한방약초연구소(1,243㎡), 군민체육센터(3,573㎡),

약선음식관(243㎡), 생약조합판매장(242㎡), 약초시장(1,368㎡),

생산이력유통센터(255㎡) 조성

○ 한방약초밸리지구 연결도로 정비공사 및 기반 조성 마무리 추진

□ 향후계획

○ 한방약초밸리지구 부지 분양(77,365㎡) 및 숙박시설, 상업시설 조성

○ 약초산업지원사업, 한방의료복지센터지구 미분양 토지 분양 및 시설 조성

사업명

수월~소둔철간도로 확포장공사

담당자

건설과 이창훈(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신안면 안봉리 수월마을에서 소둔철을 연결하는 기존 도로가 도로폭 협소로

인해 차량 교행이 불가하며, 도로를 이용하는 지역주민 불편사항이 있어 도로를

정비하여 낙후된 농촌지역의 균형개발과 농․특산물의 생산유통 향상으로 지역       경제 활성화를 도모하고 주민숙원을 해소코자 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 01월 ~ 2017년 12월

○ 위    치 : 산청군 신안면 안봉리

○ 규    모 : 도로확포장 L=2.1km, B=7.5(6.5)m

○ 총사업비 : 4,600백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,600	500	2,100	500	1,500
국 비	700		700
시 도 비
시군구비	3,900	500	1,400	500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2015년 5월 : 2공구 보상협의 추진

○ 2015년 6월 : 1공구 준공(L=1.02km)

□ 향후계획

○ 2016년 1월 : 2공구 시행

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 : 당초(L=1.02km), 변경(L=2.1km)

○ 총사업비 변경 : 당초(2,800백만원), 변경(4,600백만원)

○ 사업기간 변경 : 당초(‘10.01.~’15.12.), 변경(‘10.01.~’17.12.)

사업명

산청 시천생활체육시설조성사업

담당자

문화관광과 이승준(☎ 970-6414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존의 테니스장과 게이트볼장이 국가지원사업인 선비문화연구원건립부지로

편입되어 이전 설치가 시급한 실정임

○ 소재지권과 멀리 떨어진 지역주민들에게 생활체육 참여 기회 제공

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 ~ 2015년

○ 위    치 : 산청군 시천면 천평리 567-1번지 일원

○ 규    모 : 체육시설조성 A=23,857㎡

- 축구장 1면, 테니스장 4면, 전천후게이트볼장 1면, 편의시설 등

○ 총사업비 : 5,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	1,320	1,830	1,850
국 비	1,300		700	600
시 도 비	430		250	180
시군구비	3,270	1,320	880	1,070
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2010년 10월 : 타당성 조사 및 기본계획수립

○ 2010년 11월 : 지방재정투융자심사완료, 공유재산관리계획 승인

○ 2013년 12월 : 군관리계획 변경 용역 완료

○ 2014년 05월 : 실시설계 용역 시행

○ 2014년 06월 : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2015년 12월 : 공사 준공

사업명

제보~상능간도로 확포장공사

담당자

건설과 이창훈(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생비량면 제보리 상능마을에서 제보관동마을을 연결하는 마을간 연결도로가

도로폭 협소 및 노후로 인해 농기계 및 차량의 교행불가로 교통사고위험과

통행에 불편이 심하여 주민의 오랜 숙원을 해결코자 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 01월 ~ 2018년 12월

○ 위    치 : 산청군 생비량면 제보리 일원

○ 규    모 : 도로확포장 L=4.5km, B=7.0m

○ 총사업비 : 3,600백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,600	1,400	150		2,050
국 비
시 도 비	300	300
시군구비	3,300	1,100	150		2,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2013년 12월 : 1공구 준공(L=1.115km)

○ 2014년 10월 : 2공구 준공(L=0.886km)

□ 향후계획

○ 2016년 01월 : 제보~관동 구간(L=500m) 보상 시행

사업명

내수~매곡간도로 확포장공사

담당자

건설과 이창훈(☎970-6722)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청읍 내수리와 차황면 매곡리를 연결하는 군도8호선 미 연결 구간에 대하여

도로개설 및 도로 확포장을 하여 지역간 균형발전 및 지역주민의 편익증진에

기어코져 함.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010년 01월 ~ 2016년 12월

○ 위    치 : 산청군 산청읍 내수리 일원

○ 규    모 : 도로확포장 L=2.5km, B=8.6m

○ 총사업비 : 4,782백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,782	550	1,800	1,700	732
국 비
시 도 비	1,000		1,000
시군구비	3,782	550	800	1,700	732
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2014년 02월 ~ 2015년 12월 : 1공구 사업추진(L=1.8km)

○ 2015년 04월 : 2공구 보상협의 추진(L=0.562km)

□ 향후계획

○ 2016년 1월 : 2공구 사업 시행

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : 당초(4,500백만원), 변경(4,782백만원)

사업명

산청친환경유기한우육성사업

담당자

농축산과 이동호(☎ 970-7834)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청친환경 유기한우 생산 및 가공기반 확충을 통한 경쟁력 강화하고

자연순환농업을 통한 유기한우의 고부가가치 창출로 농가 소득증대

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012년 ~ 2014년(3년간)

○ 위    치 : 산청군 차황면 신차로 1770

○ 총사업비 : 3,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,000	1,600	1,400
국 비	1,500	800	700
시 도 비	180	96	84
시군구비	520	224	296
지 방 채
민간자본	800	480	320
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 경상보조(사업단운영, 육가공품 연구개발 등) 완료

○ 자본보조(육가공공장, 홍보․체험관 건립) 완료

□ 향후계획

○ 유기한우 브랜드 저변 확대를 위한 홍보활동 강화

○ 육가공공장, 홍보체험과 활용 확대를 위한 6차산업 활성화

사업명

한방휴양체험특화도시조성사업

담당자

경제도시과 장은화(☎ 970-6832)

□ 사업목적 및 필요성

○ 한방휴양체험특화도시 조성사업을 통해 지역의 특성과 강점을 살린 새로운

한방이미지 구축으로 주민소득증대와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012년 ~ 2015년(4년)

○ 위    치 : 산청군 산청읍, 금서면 특리․매촌리 일원

○ 규    모 : 한방약초산업특구 배수시설 및 기반시설조성(A=90,950㎡),

약초재배장(A=163,497㎡), 한방특화거리조성(L=3.5㎞)

○ 총사업비 : 5,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,000	3,700	500	800	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,700	2,700	500	500	-
시군구비	1,300	1,000	-	300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 한방약초산업특구 배수시설 등 기반시설 조성 완료

○ 한방약초재배체험장 조성 완료

○ 한방경관특화거리조성사업 일부 완료(시가지간판정비, 보도정비, 공원정비)

□ 향후계획

○ 한방경관특화거리조성사업 추진

- 한방조형물설치사업 실시설계, 사업착공 및 준공(’15.10월말)

- 보도정비사업 실시설계, 사업착공 및 준공(’15.10월말)

사업명

산청농어촌테마공원조성사업

담당자

동의보감촌관리사업소

김현철(☎970-7213)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지리산권 특산․약용식 자원의 쳬계적인 보전․증식 기반마련과 한방의료와

체험관광을 접목한 도시민 치유와 휴식공간 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012년 1월 ~ 2015년 12월

○ 위    치 : 금서면 특리 동의보감촌 지내

○ 규    모 : 0.85ha(테마공원조성,유리온실1동,풍차1식,관람로조성 L=1.0km)

○ 총사업비 : 8,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,000	5,200	2,700	100
국 비	4,000	2,600	1,350	50
시 도 비
시군구비	4,000	2,600	1,350	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 87%)

○ 기본계획 수립 및 실시설계 용역   : 2012년 9월

○ 테마공원 기반조성 및 테마길 조성 : 2012년 12월

○ 약초관 및 약초체험테마공원 조성  : 2013년 8월

○ 2013산청세계전통의약엑스포 개최 지원 : 2013년 9월 ~ 10월

○ 테마공원 내 각종 시설 정비 및 조경수목 식재  : 2014년 1월 ~ 현재

○ 관찰테크 차광시설 및 약초공원 내 초화류 식재 : 2014년 7월

○ 야외 전시 및 편의시설 설치 : 2014년 10월 (누각, 화장실 등)

○ 테마공원 부대･편의시설 보강 및 정비 : 2014년 10월

○ 관찰･체험공간 및 시설 설치(사슴 관찰데크, 한방미로공원 등) : 2015년 6월

□ 향후계획

○ 한방테마공원 야외 전시시설 설치 : 2015년 9월

○ 유리온실 및 약초테마공원 조경시설 유지관리 : 2015년 8월 ~ 현재

사업명

신안면소재지종합정비사업

담당자

경제도시과 지효수(☎ 970-6842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산어촌마을의 거점중심공간인 신안면소재지의 생활편익, 상업,  문화, 복지 등 기초서비스 기능 확충과 면소재지 기능 및 역할을 강화하여 국토의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2013년 1월 ~ 2016년 12월(4년간)

○ 사업위치 : 산청군 신안면 하정리일원

○ 시 공 사 : (주)조은이엔지 김학두,   (주)정우개발 조철현

○ 사업규모 : 원지경로당 신축 1동(2층), 친환경주차장A=350㎡,

다목적 야외공연장 A=660㎡, 가로경관정비 900m, 역량강화 1식

○ 총사업비 : 7,000백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	7,000	956	3,031	1,751	1,262
국 비	4,900	669	2,122	1,225	884
시 도 비	700	86	303	158	153
시군구비	1,400	201	606	368	225
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2013년 3월 ~ 2014년 2월 : 5월기본계획 및 실시설계완료

○ 2014년 2월 ~ 2015년 5월 : 1년차 사업착공 및 준공 (원지경로당 외 1건)

○ 2015년 2월 ~ 2015년 12월 : 2, 3년차 사업착공 및 준공 (가로경관정비 외 1건)

□ 향후계획

○ 연차별 추진 계획에 의거 2016년 12월 전체사업 준공계획

사업명

공무원임대아파트 매입

담당자

경제도시과 김종수(☎970-6822)

□ 사업목적 및 필요성

○  아파트 분양 물량 일부를 군 소속 공무원 임대아파트 용으로 매입하는 조건으로

민간아파트 건설을  유치하여 정주여건 개선으로 거주 인구를 늘려 지역경제

활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012년 10월 ~ 2014년 12월

○ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 357-1번지 일원

○ 사 업 량 : 129세대 매입

○ 총사업비 : 20,486백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	20,486	10,109	9,498	879
국 비
시 도 비
시군구비	20,486	10,109	9,498	879
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(완료 : 95%)

○ 2014.12.11: 주택건설사업 사용검사

○ 2014.12.31: 아파트 124세대 매입 및 소유권이전 등기

○ 2015.04.07: 아파트 5세대 매입 및 소유권이전 등기

사업명

내리지구 하수관거 정비사업

담당자

상하수도사업소

김상원(☎970-7024)

□ 사업목적 및 필요성

○ 본 사업은 농촌 취락지구의 주거환경개선 사업으로 수세화된 화장실 및 부엌

개량 등 날로 증가되는 생활 오·폐수를 적정하게 처리하여 지역사회의 건전한

발전과 공중위생의 향상에 기여하고 공공수역의 수직을 보전하여 쾌적한 농촌       생활환경을 조성하는데 있다.

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013.01.04 ~ 2014.11.29

○ 위    치 : 산청군 금서면 평촌리 및 산청읍 내리 일원

○ 규    모 : 하수관거(L=13.73km)

○ 총사업비 : 3,575백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	3,575	1,019	2,556
국 비	2,502	732	1,770
시 도 비
시군구비	429	126	303
지 방 채
민간자본
기 타	644	161	483

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012년 08월 : 실시설계 완료

○ 2012년 11월 : 재원협의 및 설치인가

○ 2012년 12월 : 계약심사

○ 2013년 01월 : 공사 착공

○ 2014년 11월 : 공사 준공

사업명

산청하수관거 개보수사업

담당자

상하수도사업소

김상원(☎970-7024)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거 및 배수설비 노후로 인한 불명수 유입과 저농도 하수 유입으로

하수처리장의 처리효율 저하에 따른 하수관거를 개·보수하여 하수처리시설

처리효율 향상 및 깨끗한 수질환경 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012년 01월 ~ 2016년 12월

○ 위    치 : 산청군 산청읍 및 금서면 일원

○ 규    모 : 하수관거 정비(L=3.987km), 배수설비 1,167가구

○ 총사업비 : 5,330백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,330	1,039	1,598	1,714	979
국 비	1,913	372	667	617	257
시 도 비
시군구비	1,388	250	240	475	423
지 방 채
민간자본
기 타	2,029	417	691	622	299

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 2011년 10월 : 하수관로 기술진단

○ 2012년 04월 ~ 2013년 02월 : 실시설계용역

○ 2013년 05월 : 설치인가 및 재원협의

○ 2013년 08월 : 계약심사

○ 2013년 10월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016년 06월 : 공사 준공

사업명

산청버스 정류소 확충사업

담당자

건설과 김주택☎(970-6742)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시내·외 버스 및 택시와의 합동터미널로 인한 주·정차 교통질서 혼잡 해소를 위한       주차장 확장

□ 사업개요

○ 기    간 : 2012년 ~ 2014년(3년간)

○ 위    치 : 산청군 산청읍 산청리 227-1번지 일원

○ 규    모 : 2,899㎡(터미널160㎡, 택시승강장225㎡, 주차장2,514㎡)

○ 총사업비 : 2,450백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,450	995	704	751	-
국 비
시 도 비	1,300		549	751	-
시군구비	1,150	995	155
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○2013년 10월 : 택시승강장 및 사무실 건립사업 유보조치

○2014년 11월 : 택시승강장 및 사무실 건립사업 재개

○2015년 06월 : 터미널 대합실 택시승강장 및 사무실 준공

□ 향후계획

○ ~ 2015년 12월 : 터미널 인가예정

사업명

지리산 산청곶감 명품화사업

담당자

산림녹지과 안수복(☎970-6932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청곶감의 명품화 추진을 통한 고부가가치 상품 개발로 농가소득 안정

□ 사업개요

○ 기    간 : 2014년 ~ 2016년

○ 위    치 : 산청군 시천면 송하중태길 6 (산청곶감유통센터일원)

○ 총사업비 : 4,800백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,800		300	1,000	3,500
국 비	2,400		150	500	1750
시 도 비	288		18	60	210
시군구비	672		42	140	490
지 방 채
민간자본	1,440		90	300	1,050
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014년 사업추진(재배자 교육, 선도농가시설지원사업 등) : 2014년 12월

○ 사업계획 변경승인 : 2015년 5월

□ 향후계획

○ 사업추진 : 2015년 5월 ~

○ 운영 및 사후관리 : 2015년 11월 ~

사업명

산청따라하동길조성사업

담당자

문화관광과 이승준(☎ 970-6414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대상지는 폐천부지 생태계 및 경관이 우수한 지역임에도 불구하고 수년간 방치       됨에 따라 주변 일대의 경관저해요소로 작용하여 지역주민의 다양한 활용방안을       모색 수요 급증

□ 사업개요

○ 기    간 : 2013년 ~ 2015년

○ 위    치 : 산청군 단성면 창촌리 834-25번지 일원

○ 규    모 : 경관 및 다목적시설 조성 A=71,880㎡

○ 총사업비 : 2,270백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	2,270	1,169	756	345
국 비	1,971	1,052	639	280
시 도 비
시군구비	299	117	117	65
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ 2012년 10월 : 부지활용 타당성조사 및 기본계획수립 용역

○ 2013년 07월 : 연계협력사업 계획 승인

○ 2013년 08월 : 지방재정투융자심사 의뢰

○ 2013년 11월 : 실시설계용역 완료

○ 2013년 12월 : 공사 착수

□ 향후계획

○ 2015년 12월 : 공사 완료

사업명

단성면소재지종합정비사업

담당자

경제도시과 지효수(☎970-6842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농산어촌마을의 거점중심공간인 단성면소재지의 생활편익, 상업,  문화, 복지 등

기초서비스 기능 확충과 면소재지 기능 및 역할을 강화하여 국토의 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 1월 ~ 2017년 12월(4년간)

○ 사업위치 : 경남 산청군 단성면 성내, 강누, 사월리 일원

○ 시 공 사 : (주)소프트하우스

○ 사업규모 : 문화체육공원조성, 가로경관정비, 수변산책로조성,

공동생활홈조성, 역량강화 1식

○ 총사업비 : 6,500백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	6,500		669	1,977	3,854
국 비	4,550		468	1,384	2,698
시 도 비	631		67	178	386
시군구비	1,319		134	415	770
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2014년 01월 ~ 2014년 10월 : 기본계획 및 실시설계완료

○ 2015년 01월 ~ 2015년 05월 : 문화체육공원 및 가로경관정비사업 설계완료

○ 2015년 05월 ~ 2015년 09월 : 1년차 사업착공 및 준공(성내마을화장실정비)

○ 2015년 05월 ~ 2015년 10월 : 문화체육공원 군관리계획 시설결정 용역중

□ 향후계획

○ 연차별 추진 계획에 의거 2017년 12월 전체사업 준공계획

사업명

생비량면 지방상수도 인입공사

담당자

상하수도사업소

김진경(☎970-7012)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 생비량면은 지방상수도 미급수지역이며 소규모수도시설에 의존하고 있으나

수질악화 및 수량부족 등으로 상수도 사용에 어려움이 있어 본사업을 통하여       지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 지방상수도를 공급하는데 목적이 있음

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 01월 ~ 2017년 12월

○ 위 치 : 산청군 생비량면 일원

○ 규 모 : 관로매설 L=77.1km, 가압장 4개소, 생비량 배수지 1식 등

○ 총사업비 : 8,180백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	8,180	1,523	2,357	1,143	3,157
국 비	5,726	650	1,650	800	2,626
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,454	873	707	343	531
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2014년 01월 : 수도정비기본계획(부분변경) 및 생비량지구 실시설계용역 착공

○ 2015년 05월 : 수도정비기본계획(부분변경) 승인 및 준공

○ 2015년 06월 : 생비량지구 실시설계용역 준공

○ 2015년 08월 : 군계획시설 결정 및 지방건설기술심의 협의 요청

□ 향후계획

○ 2015년 09월 : 농지전용, 도로점용 등 협의

○ 2015년 09월 : 군계획시설 결정 및 지방건설기술심의 협의

○ 2015년 10월 : 실시설계인가 및 수도사업인가 협의

○ 2015년 11월 : 사업착공

○ 2017년 12월 : 사업준공

사업명

산청군 노인․장애인복지관 건립

담당자

주민생활지원실  민병관(☎ 970-6531)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군은 노인 및 장애인의 종합복지 활용공간이 전무하여 수요계층의

불편함이 많음

○ 군 소유부지(구 보건의료원)를 활용한 적정규모의 노인․장애인 복지관(통합형)을

건립하여 군민의 복리 증진 및 건강한 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 01월 ~ 2016년 01월

○ 위 치 : 산청군 산청읍 지리 179-7 (구,보건의료원)

○ 규 모 : 지상3층(연면적 1,982.52㎡/건축면적 1,259.16㎡)

○ 총사업비 : 4,644백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	4,644	-	356	1,003	3,285
국 비	1,763	-	3	343	1,417
시 도 비	1,000	-		247	753
시군구비	1,881	-	353	413	1115
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2015년 04월 : 공사착공

○ 2015년 04월 ~ 07월 : 주차장 바닥철거, 기초의 구조적 안전성 확보를

위해 기초파일시공 건축공사 설계변경

○ 2015년 07월 : 경남도 설계변경 심사 승인

□ 향후계획

○ 2015년 08월 : 기초파일 시공 및 공사착수

○ 2016년 01월 : 공사완료, 운영조례제정, 집기구입, 수탁자 선정 등 개관준비

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경 : 지반약화로 기초파일시공을 위한 건축공사 설계변경

- 당초 : 3,003백만원(도급2,028, 관급975), 변경3,254백만원(도급2,267, 관급987)

사업명

한방항노화 산업단지 진입로 연결로조성사업

담당자

경제도시과 지효수(☎ 970-6842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산청의 새로운 미래성장을 이끌『한방특구, 항공산업, 항노화산업』 등 다양한 산업이 집적된 지구의 진입도로 미개설에 따른 사업추진 애로

○ 기존도로가 협소하고 굴곡이 심하여 대형차량(항공부품 등)의 물류수송에 지장초래로 금회 도로를 개설하여 신성장산업 발전에 크게 기여

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2014년 1월 ~ 2016년 12월(3년간)

○ 사업위치 : 산청군 금서면 매촌리일원

○ 사업규모 : 도로개설 L=360m, B=25m

○ 총사업비 : 5,100백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	5,100		2,000	2,000	1,100
국 비
시 도 비	2,550		1,000	1,000	550
시군구비	2,550		1,000	1,000	550
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2014년 1월 ~ 2014년 7월 : 실시설계완료

○ 2014년 1월 ~ 2015년 7월 : 주민공청회 및 설명회(4회)

○ 2014년 7월 ~ 현재까지 : 보상협의(52필지 중 32필지완료)

□ 향후계획

○ 2015년 12월 : 보상협의완료

○ 2015년 09월 ~ 2016년 12월 : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

구 분	계			집행액			향후 소요액
	당초	변경	증.감	기투자	‘14연도 (당초)	‘14연도 (변경)	‘15연도 (당초)	‘15연도 (당초)	‘16연도 이후	‘16연도 이후
계	5,100	6,900	증)1,800		2,000	3,400	2,000	2,442	1,100	1,058
국 비	-	742	증)742		-	700	-	42	-	-
시 도 비	2,500	2,700	증)200		1,000	1,000	1,000	1,200	500	500
시군구비	2,600	3,458	증)858		1,000	1,700	1,000	1,200	600	558

사업명

시천·단계지구 하수관로 정비사업

담당자

상하수도사업소

김상원(☎970-7024)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시천면 및 신등면 중심소재지 하수처리구역으로서 하수관거 미설치로 인해        농촌마을의 무분별한 오염원이 배출되고 있어, 금회 하수관거를 설치하여

생활오수를 적정 처리하므로 지역사회의 균형발전과 공중위생 향상에 기여하고       공공수역의 수질을 보전코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014년 01월 ~ 2016년 12월

○ 위 치 : 산청군 시천면 및 신등면 일원

○ 규 모 : 하수관거 정비(L=14.46km), 배수설비 306가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,296백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	9,296		429	2,859	6,008
국 비	6,507		300	2,001	4,206
시 도 비
시군구비	1,116		76	412	628
지 방 채
민간자본
기 타	1,673		53	446	1,174

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 2014년 01월 ~ 09월 : 실시설계용역 착수

○ 2014년 09월 : 실시설계용역 완료

○ 2014년 10월 ~ 12월 : 재원협의

○ 2015년 03월 : 계약심사

○ 2015년 04월 : 공사 착공

□ 향후계획

○ 2016년 12월 : 공사 준공