상하수도과

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 그간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	4

Ⅳ. 2019 주요업무계획	5

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업	10

Ⅵ. 신규(특수) 시책	24

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위 : 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
23		1	4	5	2	1	10

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
관리담당 (14명)	◦ 상수도특별회계 운영 ◦ 상수원 보호구역 관리 ◦ 지방상수도 시설물 및 원･정수 수질관리 ◦ 지방상수도 급․배수 및 누수관리 ◦ 상수도 대행업체 및 급수공사 관리 ◦ 상수도 요금 및 급수민원 접수․처리 ◦ 상하수도 요금부과･징수 및 체납사용료 관리 ◦ 저수조(물탱크) 청소업체 및 저수조 관리 ◦ 절수설비 및 냉․온수기 관리 ◦ 소규모 수도시설 원･정수 수질관리 ◦ 먹는물 공동시설(약수터) 시설 및 수질관리
상수도담당 (3명)	◦ 수도정비 기본계획 및 중･장기계획 수립 ◦ 상수도시설 확장 및 통ㆍ폐합사업 추진 ◦ 상수도 급수구역 확장사업 추진 ◦ 지방상수도 설치사업 추진 ◦ 노후관 교체사업 추진(누수율 제고사업 포함) ◦ 소규모 수도시설 설치 및 관리
하수도담당 (3명)	◦ 하수도 정비 기본계획 ◦ 공공하수처리시설 설치사업 ◦ 하수관로 정비사업 추진 ◦ 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수처리장 확충사업 추진 ◦ 배수설비설치 신고 및 준공 ◦ 공공하수도 원인자부담금 부과 및 징수 ◦ 배수설비 대행업체 지정 및 승인
시설운영 (3명)	◦ 공공하수처리시설 운영･관리 ◦ 공공하수도 시설관리 ◦ 공공하수처리시설 개선사업 ◦ 분뇨 등 관련영업허가 ◦ 단독정화조 설치신고 ◦ 오수처리시설 설치신고(변경) 및 준공검사 ◦ 오수,정화조 청소고지 및 과태료 부과 ◦ 오수처리시설 지도단속

Ⅱ. 그간 성과와 과제

1. 주요성과

안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 원․정수 수질검사(지방상수도, 소규모 수도시설) : 195백만원

❍ 배수지(물탱크) 청소(지방상수도, 소규모 수도시설) : 151백만원

❍ 소규모 수도시설 소독관리 : 123백만원

❍ 시천상수도 수질 연속자동측정기 설치 : 20백만원

❍ 지방상수도 시설물 개선사업 : 322백만원

안정적인 수돗물 공급을 위한 기반 조성 및 유지관리

〈 지방상수도시설 확장 및 정비 〉6건 10,519백만원

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 : 1,204백만원

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사 : 300백만원

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장사업 : 1,286백만원

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 : 2,857백만원

❍ 노후상수관망 정비사업 : 3,172백만원

❍ 지방상수도 확장사업 : 1,700백만원

〈 소규모 수도시설 개보수〉1건 3,608백만원

❍ 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지 및 개보수 : 3,608백만원

하수처리 기반 확충 및 유지관리 : 15,192백만원

❍ 오전지구 공공하수처리시설 설치사업 : 7,121백만원

❍ 산청 공공하수처리시설 증설사업 : 4,271백만원

❍ 공공하수처리시설 유지관리 및 보수(48개소) : 3,800백만원

2. 과  제

지방상수도 유수율 제고 및 생산원가 절감 노력

❍ 관망정비, 블록시스템 및 유지관리시스템 구축을 통하여 유수율 제고

❍ 급수구역 확장, 시설증설 등 생산원가 상승 년차별 요금현실화

소규모 수도시설 수질검사 항목 확대시행 대책 마련

❍ 지하수 사용 시설 방사성 물질(라돈, 우라늄) 검사항목 확대 시행

- 라돈 년 2회, 우라늄 년 1회,

❍ 검사항목 확대 시행으로 수질기준 초과시설 늘어날 것으로 판단됨

- 안전한 수돗물 공급을 위해 지방상수도 급수구역 편입 확대 필요

중장기 발전계획 등 미래수요 적극 대응

❍ 단성상수도 급수구역 확장에 따른 급수 수요증가로 취·정수시설 증설 필요

❍ 시천상수도 구곡천 계곡수 수량부족으로 비상 수원인 하천수 취수로

대체수원 확보 필요

(하천수 취수시 상수원보호구역 지정요구의 문제점이 있음)

급수지역 확대 및 공기 단축으로 주민불편 해소

❍ 수량부족과 수질불량 삼장·생비량지구 지방상수도 인입 조기 완공

❍ 용량부족과 처리효율 저하된 단성상수도 증설 및 확장사업 조기 착공

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장사업 조기착공

하수도 시설확충 및 보급률 향상

❍ 신천지구 농촌마을 하수도 정비 조속 추진

❍ 공공하수처리구역 확대 및 하수도 보급률 향상

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
양질의 물공급과 깨끗한 수환경 조성으로 행복산청 실현

⇑

	3대 역점시책
철저한 수도시설 관리로 수도행정 신뢰 제고 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상 완벽한 하수처리로 수자원 보전과 쾌적한 환경 조성

⇑

	역점시책별 이행과제
수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고 ◦ 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 추진 ◦ 노후관망 정비사업 추진으로 안정적인 수량 확보 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상 ◦ 지방상수도 급수구역 확장 및 증설사업 추진 ◦ 지방상수도 개선 및 정비사업 지속추진 ◦ 소규모 수도시설 개량사업 추진 완벽한 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성 ◦ 공공하수처리시설 확충(증설) 및 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수도 시설물 정비 및 유지관리 추진

Ⅳ. 2019년도 주요업무계획

양질의 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 행복산청 실현

철저한 수도시설 관리로 수도행정 신뢰 제고

안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상

완벽한 하수처리로 수질자원 보전과 쾌적한 환경 조성

역점 시책

1. 수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고

역점

시책

안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 지방상수도 및 소규모 수도시설 원․정수 수질관리 : 277백만원

- 지방상수도 원․정수 수질관리 : 45백만원

- 소규모 수도시설 원․정수 수질관리 : 232백만원

❍ 지방상수도 및 소규모 수도시설 배수지(물탱크) 내부청소 : 156백만원

❍ 유량계 검교정 및 수질 자동측정기 정도검사 : 31백만원

❍ 소규모 수도시설 소독시설 유지관리 : 228백만원

❍ 지방상수도 시설물 정비사업 : 136백만원

노후관망 정비사업 추진으로 안정적인 수량 확보

❍ 총사업비 25,097백만원(국비12,548, 도비2,034, 군비10,515)

- 기투자 6,344백만원, 2019년 6,344백만원, ‘20년이후 12,409백만원)

❍ 사업내용

- 관망정비 40.4km

- 누수탐사 및 정비 557km

- 블록시스템, 유지관리 시스템 구축

2. 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상

역점

시책

지방상수도 급수구역 확장 및 증설사업 추진

❍ 생비량, 삼장지구 지방상수도 인입공사

- 생비량 지구 : 총사업비 13,951백만원(기투자 12,085)

․ 2019년도 : 1,866백만원(국비 1,866)

※ 배수지 300톤, 가압장 4개소, 관로매설 77.1km

- 삼장지구 : 총사업비 6,864백만원(1지구 1,164, 2지구 5,700)

․ 2019년도 : 257백만원(국비 180, 군비 77)

※ 배수지 300톤, 가압장 2개소, 관로매설 44km

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

: 총사업비 19,360백만원( 기투자 3,572, ’20년이후 12,502)

- 2019년도 : 3,286백만원 (국비 2,300, 군비 986)

※ 정수장증설 1,900톤/일(4,100㎥/일⇒6,000㎥/일), 가압장 1개소,

관로매설 62km

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장사업

: 총사업비 10,000백만원(기투자 1,715, ’20년이후 7,142)

- 2018년도 : 1,143백만원(국비 800, 군비 343)

※ 가압장 4개소, 관로매설 49km

지방상수도 정비사업 지속추진

❍ 생비량지구 지방상수도 정비공사(포장분)

: 총사업비 1,000백만원(군비 1,000)

※ 아스콘 덧씌우기 L=30km

❍ 중촌 가압장 시설 정비공사

: 총사업비 500백만원(군비 500)

※ 가압장 기계 및 전기설비 1식, 계측제어설비 1식

❍ 지방상수도 관로신설 및 노후관로 교체

: 총사업비 500백만원(군비 500)

※ 노후관로 신설 및 교체 L=5km

소규모 수도시설 개량사업 추진

❍ 소규모 수도시설 개량사업 : 858백만원(국비 600, 군비 258)

※ 노후관로교체, 시설물(관정, 물탱크 등) 개량

❍ 소규모 수도시설 개보수 및 유지관리 : 4,882백만원(군비 4,882)

※ 11개 읍·면 상수도 개보수사업 31개소, 지하수영향조사 2개소,

사후관리 용역 29개소, 긴급보수 1식, 소방용수시설 관리 25개소

3. 완벽한 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성

역점

시책

공공 하수처리시설 확충 및 정비

❍ 신천지구 농촌마을 하수도 정비사업

- 신천지구 하수도 정비사업 : 총사업비 8,638백만원(국비5,624, 기금 1,446, 도비 482, 군비 1,086)

․ 2019년도 : 1,808백만원(국비 1,177, 기금 302, 도비 101, 군비 228)

※ 하수처리장 90㎥/일, 하수관로 L = 12.3km

공공하수도처리시설 정비 및 유지관리

❍ 공공하수도처리시설 유지보수 : 150백만원(군비 150)

❍ 하수처리시설 기술진단 및 개선사업 : 185백만원(군비 185)

❍ 공공하수도 정밀진단 개선사업 : 129백만원(군비 129)

❍ 공공하수처리시설 대행관리 용역 : 2,000백만원(기금 833, 군비 1,167)

하수관로 정비 및 유지관리

❍ 하수관로 수선유지 및 긴급보수 : 350백만원(군비 350)

❍ 하수관로 CCTV 및 연막조사 : 100백만원(군비 100)

❍ 하수관로 설치공사 3건 : 1,750백만원(군비 1,750)

❍ 하수관로 기술진단 및 개선사업 : 1,499백만원(군비 1,499)

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업

안심하고 마실수 있는 수돗물 공급추진

생비량지구 지방상수도 인입공사

□ 삼장지구 지방상수도 인입공사

단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

산청급수구역 지방상수도 확장사업

□ 생비량지구 지방상수도 정비공사

□ 중촌가압장 시설 정비공사

□ 노후 상수관망 정비사업

□ 지방상수도 수혜지역 확장

생비량지구 지방상수도 인입공사 조기마무리

신천지구 농촌마을하수도 정비사업

공공하수도 수혜지역 확장

완벽한 하수처리로 쾌적한 환경조성

1. 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급 추진

□ 수질 및 수량관리와 시설개선 등을 통하여 보다 나은 서비스를      제공 함으로서 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급에 기여코자함

추진방향

❍ 지방상수도 누수저감 및 유수율 향상을 위한 노력 확대

❍ 수질관리가 취약한 소규모 수도시설에 대한 관리강화

사업개요

분야	공종		사업비(백만원)	비고
계			1,955
지방상수도	원․정수 수질검사(3개 상수도)		45
	시천정수장 배출수처리시설 개선외 3건		136
	관로 기술진단(신안,단성)		60
	노후 계량기 급∙배수관로 교체공사		420
	급․배수관 수선(급수구역 전역)		580
	배수지 및 침전지 내부청소(3개 상수도)		60
	단성 취∙정수장 비상발전기 설치		100
소규모 수도시설	원∙정수 수질검사(295개소)		230
	소독기 유지관리	필터교체 및 약품보충(295개소)	130
		투입기 교체(100개소)	98
	배수지(물탱크) 내부청소(295개소)		96

그간 추진사항

❍ 정비 및 개선사업 용역착공 : ’19. 2월

추진계획

❍ 정비 및 개선사업 착공 : ’19. 4월

❍ 사업 준공 : ’19. 12월

기대효과

❍ 수질 및 수량관리와 시설개선 등을 통해 수돗물에 대한 신뢰도

제고와 대민 서비스 향상에 기여

2. 생비량지구 지방상수도 인입공사

□ 생비량면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량     및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여 안정적이고       깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상 및 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 가압장 4개소, 관로매설 77.1km 등

❍ 사 업 비 : 1,866백만원(국비1,866)

※ 총사업비 : 13,951백만원(기투자 12,085)

❍ 사업내용 : 관로매설 및 포장복구 11.0km

❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2019. 12.

그간 추진사항

❍ 본공사 3차분 착공 : ’17. 01월

❍ 본공사 4차분 착공 : ’18. 01월

❍ 경상남도 사업기간 변경 승인 : ’18. 02월

❍ 본공사 3차분 준공 : ’18. 10월

추진계획

❍ 본공사 4차분 준공 및 5차분 착공 : ’19. 01월

❍ 시설공사 준공 및 시운전         : ’19. 07월

❍ 총공사 준공 및 지방상수도 공급  : ’19. 10월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

3. 삼장지구 지방상수도 인입공사

□ 삼장면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량 및     원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여 안정적이고     깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 가압장 2개소, 관로매설 44km 등

❍ 사 업 비 : 257백만원(국비 180, 군비 77)

※ 총사업비 : 6,864백만원(1지구 1,164, 2지구 5,700)

❍ 사업내용 : 관로매설 L=2.5km 등

❍ 사업기간 : 2016. 1 ~ 2020. 12(1지구 2016~2017, 2지구 2018~2020)

그간 추진사항

❍ 총사업비 변경 협의 요청 : ’16. 12월

❍ 2018년 지특회계 신규사업 신청(2지구) : ’17. 3월

❍ 2018년 지특회계 인센티브 선정(2지구) : ’17. 9월

❍ 1지구 공사 착공 : ’17. 12월

❍ 1지구 공사 준공 : ’18. 10월

추진계획

❍ 2지구 실시설계 완료 및 공사 착공(부분 발주)  : ’19. 01월

❍ 총사업비 변경, 인‧허가 및 보상 등 협의       : ’19. 03월

❍ 2지구 본사업 착수                           : ’19. 04월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

4. 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

□ 산청군 수도정비기본계획(변경)에 따라 지방상수도가 공급되지       않은 마을에 지방상수도를 공급하고 단성정수장 증설사업을 병행      추진하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 단성정수장 증설로 지방상수도 급수구역 확장

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면, 신안면, 신등면 일원

❍ 사 업 량 : 정수장 증설 Q=1,900톤/일(4,100톤/일→6,000톤/일)

관로매설 L=62km, 가압장 1식 등

❍ 사 업 비 : 3,286백만원 (국비 2,300, 군비 986)

※ 총사업비 19,360백만원( 기투자 3,572, ’20년이후 12,502)

❍ 사업내용 : 취수장 증설

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.

그간 추진사항

❍ 기본 및 실시설계용역 1차분 착수    : ’17. 05월

❍ 기본 및 실시설계용역 2차분 착수    : ’18. 01월

❍ 기본 및 실시설계용역 중지 및 재개  : ’18. 10월

추진계획

❍ 행정절차, 인‧허가 이행 및 용역 완료 : ’19. 03월

❍ 본공사 착공                        : ’19. 04월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

5. 산청급수구역 지방상수도 확장사업

□ 산청·생초 통합 정수장 증설 사업 완료에 따라 수도정비기본계획에 의거 지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도 확장사업을 통하여 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍, 오부면, 생초면, 금서면 일원

❍ 사 업 량 : 관로매설 L=49km, 가압장 4개소 등

❍ 사 업 비 : 1,143백만원(국비 800, 군비 343)

※ 총 사업비 : 10,000백만원(기투자 1,715, ’20년이후 7,142)

❍ 사업내용 : 지방상수도 인입에 따른 관로매설 등

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2019. 12

그간 추진사항

❍ 기본 및 실시설계용역 1차분 착수    : ’17. 05월

❍ 기본 및 실시설계용역 2차분 착수    : ’18. 01월

❍ 기본 및 실시설계용역 중지 및 재개  : ’18. 10월

추진계획

❍ 행정절차, 인‧허가 이행 및 용역 완료 : ’19. 03월

❍ 본공사 착공                        : ’19. 04월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

6. 생비량지구 지방상수도 정비공사

□ 생비량면 지방상수도 인입공사 추진에 따라 굴착 및 부분복구 포장된      농어촌도로와 마을진입로 등을 전면 포장하고 주변 부대공사를       추진함으로써 지역주민의 주거환경 개선에 기여하고자 함

추진방향

❍ 도로굴착 및 관로매설 구간 도로복구를 통해 주거환경 개선

❍ 미비한 주변정비를 통해 쾌적한 환경 조성

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량 : 아스콘 덧씌우기 L=30km, 기타 부대정비 1식

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(군비 1,000)

❍ 사업내용 : 도로 아스콘 포장복구, 주변환경 정비 등

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

추진계획

❍ 측량 및 설계  : ’19. 01월

❍ 공사 착공     : ’19. 03월

❍ 공사 준공     : ’19. 10월

기대효과

❍ 안정적인 물 공급으로 지역주민의 생활에 기여

❍ 수도행정의 신뢰성 제고

7. 중촌가압장 시설 정비공사

□ 생비량면 등 급수구역 확장으로 인한 용량부족 및 노후화로 시설     정비가 시급한 상황으로, 시설정비 공사를 통해 양질의 수돗물을     안정적으로 공급하여 지역민 생활여건을 개선하고자 함

추진방향

❍ 노후된 시설정비를 통해 안정적인 상수도 공급

❍ 안정적으로 상수도를 공급함으로써 지역주민 편익 제고

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 중촌리 일원

❍ 사 업 량 : 기계, 전기, 계측제어 설비 정비 1식

❍ 사 업 비 : 500백만원(군비 500)

❍ 사업내용 : 계측제어, 가압장 기계 및 전기 설비 정비 1식

❍ 사업기간 : 2019. 1 ~ 2019. 12

추진계획

❍ 측량 및 설계 : ’19. 01월

❍ 공사 착공    : ’19. 02월

❍ 공사 준공    : ’19. 10월

기대효과

❍ 안정적인 물 공급으로 지역주민의 생활에 기여

❍ 수도행정의 신뢰성 제고

8. 노후 상수관망 정비사업

□ 노후상수관망 정비로 녹물 발생·이물질 유입예방 등 안전한 수돗물을     공급하고 누수 저감을 통한 유수율제고 향상 및 상수도 운영·관리의     선순환 구조를 구축하고자 함

추진방향

❍ 노후상수관망 정비사업을 통한 유수율(62.6% →85%) 제고

❍ 누수량 감소로 수돗물 생산비용 절감을 통한 경영수지개선

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사 업 량 : 관망정비 L=40.4km, 누수탐사·정비 L=557km

블록시스템 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 사 업 비 : 25,097백만원(국비12,548, 도비2,034, 군비10,515)

※ 기투자 6,344백만원, 2019년 6,344백만원, ‘20년이후 12,409백만원

❍ 사업내용 : 관망정비, 누수탐사‧정비, 블록/유지관리시스템 구축

❍ 사업기간 : 2016. 10. ~ 2021. 12.

※ 한국환경공단 일괄위탁 시행

그간 추진사항

❍ 위‧수탁 협약체결(산청군↔한국환경공단) : ’16. 10월

❍ 기본설계 용역 준공                    : ’17. 09월

❍ 실시설계 및 관망관리 용역 착공        : ’17. 11월

❍ 누수탐사 및 복구공사 착공             : ’17. 12월

❍ 블록시스템 구축공사 착공              : ’18. 06월

추진계획

❍ 유지관리시스템 구축공사 착공 : ’19. 04월

❍ 블록시스템 구축공사 준공     : ’19. 06월

❍ 관망 종합 정비공사 착공      : ’19. 10월

기대효과

❍ 매년 누수저감 및 수돗물 생산비용 절감

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

9. 지방상수도 수혜지역 확장

□ 상수도가 공급되지 않는 지역에 대하여 지방상수도 시설증설 및

구역확장을 통하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하므로서 주민

주거환경 개선에 기여

추진방향

❍ 수도정비 기본계획(변경) 수립을 통한 지방상수도 공급구역 확장으로 상수도 보급율 향상에 기여

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 정수장 증설(단성, 시천), 배수지 설치(오부, 삼장)

❍ 사 업 비 : 46,224백만원(국 32,356, 지 13,868)

❍ 사업기간 : 2018. 1 ~ 2022. 12

그간 추진사항

❍ 산청군 수도정비기본계획(변경) 본안 승인 : ’18. 10월

❍ 산청, 단성 급수구역 실시설계용역 준공 : ’18. 12월

추진계획

❍ 관련 인·허가 협의 완료 및 공사착공 : ’19. 3월

문제점 및 대책

❍ 환경부 균특회계사업으로 연도별 예산확보 노력 필요

❍ 경남도 및 환경부에 예산확보 협조요청

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익제공 및 복지증진

❍ 지역간 균등급수 및 생활개선을 통한 지역균형발전 기여

10. 생비량지구 지방상수도 인입공사 조기 마무리

□ 소규모 수도시설에 의존하여 수질불량 및 원수 부족의 어려움을

겪고 있는 생비량지구에 지방상수도를 인입, 안정적이고 깨끗한

상수도 공급으로 주민불편를 해소코자함

추진방향

❍ 생비량지구 지방상수도 조기인입으로 안정적인 수돗물 공급과 주민편익 제공

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량

- 배수지(300톤) 1식, 관로매설 77.1km

- 가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

❍ 사 업 비 : 13,951백만원(국 9,766, 군 4,185)

❍ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2019. 12

그간 추진사항

❍ 본공사 3차분 준공 : ’18. 10월

추진계획

❍ 본공사 4차분 준공 및 5차분 착공 : ’19. 1월

❍ 총사업 준공 : ’19. 12월

문제점 및 대책

❍ 중촌배수지 증설후 생비량 전지역 지방상수도 공급 가능

❍ 2019년 상반기내 중촌 배수지 증설 준공추진

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익제고 및 복지증진

❍ 지방상수도 확장을 통한 기반시설 인프라 구축 및 인구유입 증대

11. 신천지구 농촌마을하수도 정비사업

□ 시천면 신천리 일원에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정       처리하여 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민보건향상에 기여코자 함

추진방향

❍ 신천지구 하수도정비사업을 통해 쾌적한 주거환경 개선

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 시천면 신천리 일원

❍ 사 업 량  : 하수처리장 90㎥/일, 하수관로 L=12.3km

❍ 사 업 비 : 8,638백만원(국비 5,624, 기금 1,446, 도비 482, 군비 1,086)

⇒ 2019년도 : 1,808백만원(국비 1,177, 기금 302, 도비 101, 군비 228)

❍ 사업기간 : 2017. 1. ~ 2020. 03.

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획(부분)변경 : ’17. 9월

❍ 공법선정완료 : ’17. 10월

❍ 설치인가 및 재원협의 완료 : ’18. 9월

❍ 실시설계 및 계약심사 완료 : ’18. 9월

추진계획

❍ 공사발주 및 착공  : ’18. 9월

❍ 공사 준공 예정 : ’20. 3월

기대효과

❍ 농촌지역의 열악한 주거환경 개선으로 주민생활 편익 도모

12. 공공하수도 수혜지역 확장

□ 공공하수도 수혜지역 확장으로 공공수역의 수질개선 및 주거환경

개선에 기여하고자 함

추진방향

❍ 공공하수도 수혜지역 확장으로 공공수질개선 및 주거환경 개선

사업개요

❍ 위    치  : 산청읍 모고리일원, 차황면 상법리 일원

❍ 사 업 량

- 모고지구 : 하수관로 L=9.1km, 배수설비 : 299가구

- 상법지구 : 하수처리시설(60㎥/일) 1개소, 관로 L=3.9km,배수설비 134가구

❍ 사 업 비 : 13,373백만원( 국비 9,362백만원, 지방비 4,011백만원)

-모고지구 : 9,055백만원(국비 6,339, 지방비 2,716)

-상법지구 : 4,318백만원(국비 3,023, 지방비 1,295)

❍ 사업기간 : 2020. ~

그간 추진사항

❍ 상법지구 실시설계 용역착수 : ’18. 8월

추진계획

❍ 모고지구 실시설계 용역발주계획 : ’18. 11월

문제점 및 대책

❍ 2019년도 하수도분야 예산(환경부) 반영, 기재부 예산심의 탈락

❍ 2020년 예산확보를 위한 실시설계 발주 및 마무리

❍ 예산확보를 위한 중앙부처 및 국회방문 협의 등

기대효과

❍ 생활오수의 안정적인 처리로 양질의 수자원 확보

13. 완벽한 하수처리로 쾌적한 환경조성

□ 완벽한 하수처리와 시설관리로 쾌적한 주거환경을 조성하고 하천      수자원 보전에 기여코자함

추진방향

❍ 완벽한 하수처리로 함께 만드는 명품산청 조성에 기여

사업개요

❍ 시설용량  : 공공하수처리시설 3개소 ,  마을하수도 45개소

분야	공종	사업비(백만원)	비고
계		2,831
시설개선	하수처리시설 기술 및 정밀진단, 개선사업	311
	공공하수처리시설 긴급복구	50
관리운영	공공하수처리시설 관리대행	2,000
	하수슬러지 위탁처리	270
	통합관리센터 유지보수	200

❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2019. 12.

그간 추진사항

❍ 하수처리시설 기술진단 용역준공 :  ’17. 12월

❍ 하수처리시설 정밀점검 용역준공 :  ’18.  5월

❍ 공공하수처리시설 대행관리 용역비 산정준공  : ’18. 9월

추진계획

❍ 공사(용역)발주 및 착공  : ’19. 1월

❍ 공사(용역)준공 예정 : ’19. 12월

기대효과

❍ 생활하수의 완벽한 처리로 쾌적한 주거환경 조성

Ⅵ. 특수(신규) 시책

상수도 계량기 자가 검침제 시범도입

1. 상수도 계량기 자가 검침제 시범도입

□ 수용가에서 상수도 계량기를 스스로 확인해 신고한 사용량을 근거로      요금을 부과하므로서 요금에 대한 불신해소 및 신뢰성 확보에 기여

추진방향

❍ 자가 검침 수용가에 대해서는 참여 확대를 위해 요금 감면안 마련

현    황                                         (세대)

계	상수도	지하수	비고
7,131	6,987	144

문제점 및 대책

❍ 계량기 검침을 위해 수용가 방문시 맞벌이 세대증가로 대부분 평일에 부재중이거나 개인 사생활 침해 등의 사유로 검침 애로

❍ 검침원이 방문 일괄검침 상·하수도 요금 부과에 따른 주민불신 가중

⇒ 수용가에서 배부된 검침기록표에 실제 사용량을 기록 검침원이 방문하거나 전화로 확인된 사용량을 확인 요금부과

추진계획

❍ 자가검침 가구에 대한 요금감면 조례 개정(안) 마련 : 2019. 3월중

❍ 자가검침 요금감면에 대한 주민홍보 : 2019. 4~6월중

❍ 자가검침제 도입 및 요금감면 시행 : 2019. 7월중

기대효과

❍ 자가 검침제 도입으로 검침에 대한 불신을 사전 차단하고 상수도업무의 신뢰도 향상

❍ 수용가에서 상수도 계량기 검침시 옥내누수 등을 사전 확인할수 있어 과다요금 부과에 따른 민원해소