안 전 건 설 과

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	9

Ⅳ. 2020년도 주요업무계획	11

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업	21

Ⅵ. 신규(특수) 시책	43

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위 : 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
22		1	7	9	3	2

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
건설행정담당 (5명)	◦소규모 주민숙원사업 및 지역개발사업 ◦각종 건설사업장 편입물건 보상 및 등기 ◦전문건설업 및 골재 채취업 등록․관리 ◦국토교통부 소관 국유재산관리 ◦건설기계대여사업장 관리 및 조종사면허증, 검사과태료
안전관리담당 (3명)	◦안전 및 인적·사회적 재난관리 ◦안전관리기본계획수립 및 안전한국훈련 실시 ◦국가안전대진단 추진 ◦여름철 물놀이 안전관리
도로담당 (3명)	◦도로중장기 계획 및 노선선정계획 ◦군도·농어촌도로 관리 및 정비 ◦교량 및 도로시설물 유지관리, 지역교통환경개선사업 추진 ◦도로점용 및 접도구역 관리, 도로사업보상 추진
하천담당 (3명)	◦하천(국가하천, 지방하천, 소하천) 관리 및 지도점검 ◦각종하천사업 설계, 지도감독 및 준공 ◦하천기본계획수립 및 하천사업 보상 ◦하천점사용 허가 및 공유재산 관리 등
농업기반담당 (3명)	◦농업기반정비사업 계획 수립 및 추진 ◦재해(한해) 대책 수립 및 복구 ◦수리시설(양·배수장, 저수지, 관정 등) 유지관리 ◦국유재산(농림부) 관리 및 사용허가
자연재난담당 (4명)	◦자연재난종합상황실 운영 및 관리 ◦재해위험지구 및 재해취약시설 점검 관리 ◦자연재난 조사 및 복구계획 수립 등 상황 종합관리

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

소규모 주민숙원사업 추진으로 주민편익 증대

❍ 사업실적                                      (단위 : 백만원)

구 분	총 사업계획		군 시행		읍․면 시행		비고
	건	사업비	건	사업비	건	사업비
합 계	222	14,644	54	8,220	168	6,424
마을진입도로 정비	128	7,189	24	3,560	104	3,629
농로 정비	45	2,540	6	415	39	2,125
세천 정비	11	740	2	320	9	420
다목적광장 조성	15	2,509	14	2,489	1	20
소교량 및 기타	23	1,666	8	1,436	15	230

공익사업의 효율적인 수행을 위한 토지 등 협의

❍ 손실보상 협의(2018. 12. 31. 현재)

- 부동산(토지, 건물) 보상 : 670필지 279,530㎡, 8,125백만원

- 지장물 등 영농손실 보상 : 525건 8,128백만원

국가안전대진단 및 시설물 안전점검 실시로 재해와 재난예방

❍ 국가안전대진단 실시 : 7개 분야 264개소(공공 196, 민간 68)

❍ 다중이용시설, 재난취약시설, 어린이 놀이시설 등 안전점검 : 12회

❍ 공연․축제장 사전 합동안전점검 7회, 물놀이 관리지역 점검 관리 23개소

재난대응 안전한국훈련 실시로 재난상황에 대한 신속한 대응체계 마련

❍ 훈련기간 : 2019. 10. 28. ~ 11. 1.

❍ 훈련유형 : 실행기반 기능훈련 및 토론 기반형 훈련 실시

❍ 주요내용

- 공무원 비상소집 및 민방위 훈련 실시

- 재난대응토론 및 실제훈련(지진에 따른 청사 복합재난 대응‧복구)실시

- 소소심 안전교육 및 안전문화캠페인과 불시 메시지 훈련

도로(군도․농어촌도로) 확포장사업으로 군민의 공공복리 향상

❍ 정비현황

- 군도 정비사업 : 8개소(12.78km/3,300백만원)

- 농어촌도로 정비사업 : 18개소(14.32km/7,840백만원)

❍ 사업내용 : 군도 및 농어촌도로 확포장

하천정비 및 유지관리사업으로 재해예방 및 하천환경개선

❍ 사업실적                                     (단위 : 백만원)

구 분	총사업비	하천 시설정비		하천유지관리		비 고
		건	사 업 비	건	사 업 비
국가하천 (남강)	350백만원	1건	150백만원	4개소	50백만원	안전점검용역
				5개소	150백만원	유수지장목제거 및 제방풀베기
지방하천 (경호강 백리길 조성사업 외)	5,150백만원	16건	4,150백만원	11건	800백만원	하천퇴적물제거사업
				11건	200백만원	유수지장목제거사업
소 하 천 (지정 소하천 외)	3,660백만원	18건	3,410백만원	1건	250백만원	소하천 기성제정비

덕천강 고향의 강 조성사업 추진으로 테마하천 환경조성

❍ 위  치 : 시천면 사리 ~ 삼장면 대포

❍ 사업량 : 하천정비 L=5.1km(자전거도로, 하천환경정비 등)

❍ 사업비 : 28,249백만원(국비 16,949, 도비3,390, 군비7,910)

❍ 사업기간 : 2011. 10월 ~ 2020. 1월

❍ 추진현황

- 공 정 율 : 85%

- 현재추진상황 : 1·2·3·4차분 준공, 5차분 시행중(하도 및 호안정비)

농업생산기반시설 정비를 통한 안전 영농기반 구축

❍ 사업실적                                     (단위 : 백만원)

사 업 명	정 비 현 황		사업내용	비고
	사 업 량	사업비
합 계	7건	13,578
재해위험저수지정비사업	재해위험저수지 정비 4개소	1,774	재해위험저수지 월곡, 배평전 큰골, 왕촌저수지 정비
노후저수지개보수사업	노후저수지 개보수 2개소	450	D등급 저수지 2개소 개보수
소규모배수개선사업	배수장 2개소	500	신연지구 소규모 배수개선사업
경작로확포장사업	경작로확포장 L=3.4km	400	차황, 단성, 시천, 신등면 경작로 확포장
소규모용수개발사업	양수장 1개소, 관로 L=2.6km	1,686	단성 길리 가뭄 우려지구 농업용수 확보
지표수보강개발사업	내정저수지 저수량 확장 1식	1,571	산청읍 내정지구 지표수 부족지역 농업용수 확보
농업기반주민숙원사업	용배수로, 농로등 기반시설 정비 1식	7,197	산청읍 외 10개면 주민숙원사업

재해의 근원적 예방대책 사업 추진으로 군민의 생명과 재산보호

❍ 사업실적                                        (단위 : 백만원)

사 업 명	정 비 현 황		사업내용	비고
	사 업 량	사업비
합 계	7개소	54,915
산청읍 지리 자연재해 위험지구개선정비	교량1개소, 고지배수로363m 배수펌프장 1개소 등	14,564	위험개선지구 정비
산청읍 지리2 급경사지 붕괴위험지역	옹벽사면정비 L=100m	2,114	붕괴위험지역 정비
어서지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	사면정비 L=440m	4,400	붕괴위험지역 정비
신안면 적벽산 급경사 붕괴위험지구	위험도로사면 정비 L=930m 피암터널설치 L=700m	29,184	붕괴위험지역 정비
생비량면 가락바위 급경사 붕괴위험지구	위험도로사면정비 L=225m	2,200	붕괴위험지역 정비
백운마을 위험소교량 재 가설공사	교량1개소,도로개설L=445m	1,050	위험교량 정비
손항교 재가설공사	교량1개소,도로개설L=228m	1,403	위험교량 정비

2. 과 제

재난 초기대응 기능 강화 필요

❍ 재난상황실 24시간 전담 공무원 배치로 신속한 재난대응체계 구축

❍ 재난 원인조사 및 분석, 재난관리자원 공동 활용시스템 운영

재난 예방·대비 기능 강화 및 안전문화운동 활성화

❍ 재난상황에 맞는 위기상황 매뉴얼 작성 및 생활주변 위해요소 안전      신문고 신고 활성화 필요

❍ 주민대상 안전문화운동 전개·홍보, 안전점검의 날 행사 추진

신속한 사업추진을 위한 손실보상 협의 적극 추진

❍ 공익사업의 원활한 추진과 조기 발주를 위해 적극적 협의 추진

❍ 매수 협의 불가한 토지 등에 대하여 토지수용 재결 추진

지역경제 활성화 및 군민 편의증진을 위한 도로건설 사업 시행

❍ 자체사업비로 추진함에 따라 사업기간 장기화 우려

- 장기 계속추진사업에 우선 투자하여 조기에 마무리함으로써 주민불편 최소화

- 신규사업은 주민수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 추진

- 주민건의사업 등 숙원해결 및 지역교통환경개선을 위한 사업 추진

❍ 2020년 사업현황

- 군도 정비사업 : 6개노선(L=6.79km/2,860백만원)

- 농어촌도로 정비사업 : 20개노선(L=21.04km/8,840백만원)

- 도로주민숙원사업 : 21개소(L=13.84km/3,620백만원)

교량보수 및 기타 도로사업 추진

❍ 교량정밀점검 및 안전점검을 통하여 보수가 필요한 교량 정비

- 정밀점검대상 교량 : 6개소

- 안전점검대상 교량 : 168개소(2종 13개소, 3종 88개소, 기타 67개소)

- 교량관리사업 : 안전점검 168개소 및 유지보수 6개소(500백만원)

❍ 관내 도로의 안전시설, 배수로 등 미설치구간 정비 및 교통사고

위험요소가 있는 지구에 대해 우선적으로 정비

- 유지관리대상 도로 : 217개 노선, 738.9km(국도 1개 노선 45.2km, 지방도

9개 노선 130.3km, 군도 20개 노선 225.2km, 농어촌도로 187개 노선 338.2km)

- 도로유지관리사업 : 소파보수, 차선도색, 풀베기 등 6건(500백만원)

경호강 백리길(자전거도로)조성사업으로 품격높은 문화환경 조성

❍ 구    간 : 단성면 소남리 ~ 금서면 주상리

❍ 사 업 량 : 자전거도로조성 등 L=46.5km(2020년 L=10.5㎞)

❍ 사 업 비 : 5,500백만원(도비 4,000, 군비 1,500)

❍ 사업기간 : 2020년 03월 ~ 2012년 12월

❍ 추진현황 : 자전도로 실시설계 중(2019. 10월 준공)

❍ 향후계획 : 진주시와 연계하여 2019. 12월경 공사 발주 및 착수

농업시설 노후 및 봄 가뭄 확산에 따른 대책 마련

❍ 수리시설 노후 및 기능 저하에 따른 유지관리 수요 증가와 이상기후로 인해 지속적인 봄 가뭄이 우려되고 있는 실정으로, 영농기 이전 수리시설 점검 및 보수를 위한 유지관리예산 확대 편성과 가뭄취약지역 저수지, 양수장, 관정 등 수원공 개발의 항구 대책 필요

❍ 2020년 사업계획                                (단위 : 백만원)

구분	합계	유지관리 (군)	유지관리 (농촌공사)	저수지 정 비	수원공 개 발	안전점검	비고
사업량	31개소	6개소	8개소	9개소	2개소	6개소
사업비	5,111	559	800	1,656	2,000	96

신안면 적벽산 급경사 붕괴위험지역 조기 정비

❍ 사 업 비 : 29,184백만원 ( 국비 14,592 , 도비 4,378 , 군비  10,214 )

❍ 사 업 량 : 붕괴위험지역 사면 정비 L=0.9km(피암터널 L=0.7km)

❍ 사업기간 : 2013. 01. ~ 2021. 6

❍ 그간 추진사항

- 2015. 10월 : 실시설계용역 완료

- 2018.  1월 : 지방건설기술심의 개최

- 2018.  6월 : 건설사업관리용역 및 공사 계약

- 2019.  4월 : 적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업(2차분) 착공

- 2019.  6월 : 적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업(1차분) 준공

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
편리하고 안전한 사회기반시설 확충 및 정비

⇑

	7대 역점시책
소규모 주민숙원사업 추진 효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축 군민과 함께하는 생활안전문화 운동 활성화 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비 안전하고 아름다운 하천관리 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

⇑

	역점시책별 이행과제
소규모 주민숙원 사업 추진 ◦ 소규모 주민숙원사업 군 시행 ◦ 읍·면 주민숙원사업 ◦ 소규모 위험시설 개보수사업 효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축 ◦ 재난안전상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축 ◦ 재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련 실시

	역점시책별 이행과제
□ 군민과 함께하는 생활안전문화 운동 활성화 ◦ 생활안전을 위한 안전점검 활동 전개 ◦ 생활안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취 □ 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비 ◦ 군도 확·포장 사업 추진 ◦ 농어촌도로 확·포장사업 추진 ◦ 교량보수 및 기타 도로사업 □ 안전하고 명품 관광 기능을 보유한 하천관리 ◦ 안전한 하천유지관리사업 추진 ◦ 자연재난대비 및 명품 관광 기능을 보유한 하천정비 ◦ 퇴적물제거 및 유수지장목 제거 □ 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비 ◦ 수리시설 개보수 사업 ◦ 소규모 용수개발 사업 ◦ 기계화 경작로 확포장 사업 ◦ 재해위험저수지 정비사업 ◦ 농업기반 주민숙원 사업 □ 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진 ◦ 법평 자연재해위험개선지구 정비사업 ◦ 적벽산 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 ◦ 어서 급경사지 붕괴위험지역 정비

Ⅳ. 2020년도 주요업무계획

편리하고 안전한 사회기반시설 확충 및 정비

소규모 주민숙원사업

효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축

군민과 함께하는 생활안전문화 개선 도로정비

교통편익 증민 및 생활환경 개선 도로정비

안전하고 아름다운 하천관리

안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

역점시책

1. 소규모 주민숙원사업

역점

시책

소규모 주민숙원사업(군시행)

❍ 농촌주거환경 개선과 주민불편시설에 대한 정비사업 시행

- 위    치 : 산청읍 외 10개면

- 사 업 량 : 군 시행 51건

- 사 업 비 : 15,570백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : ‘19. 10월 ~ ‘19. 12월

- 조사측량 및 설계             : ‘19. 12월 ~ ‘20.  2월

- 사업시행 및 준공             : ‘20.  3월 ~ ‘20. 12월

※ 소규모 주민숙원(군시행)사업은 사업비 1억이상 사업을 읍면별 선정 후  군에서 사업시행

읍·면 주민숙원사업

❍ 농촌주거환경 개선 및 주민불편시설 중 소규모 읍면 자체 정비사업 시행

- 위    치 : 산청읍 외 10개면

- 사 업 량 : 읍면시행 206건

- 사 업 비 : 8,568백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : ‘19. 10월 ~ ‘19. 12월

- 조사측량 및 자체설계         : ‘19. 12월 ~ ‘20.  2월

- 사업시행 및 준공             : ‘20.  3월 ~ ‘20. 10월

※ 읍면 주민숙원사업은 합동 설계를 통한 자체설계로 예산절감 및

사업조기 발주

소규모 위험시설 개보수사업

❍ 2019년 소규모 공공시설 안전점검 결과 위험시설로 평가된 시설에 대한 개보수로 주민안전 도모

- 위    치 : 신안면 중촌리 창안마을 농로 정비공사 외 2개소

(생초 원계남세천, 생비량 봉두세천)

- 사 업 량 : 농로(마을안길) 정비 1개소, 세천정비 2개소

- 사 업 비 : 550백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보  : ‘19. 10월 ~ ‘19. 12월

- 조사측량 및 설계             : ‘19. 12월 ~ ‘20.  2월

- 사업시행 및 준공             : ‘20.  3월 ~ ‘20. 12월

2. 효율적 위기관리로 안전총괄체계 구축

역점

시책

재난안전상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축

❍ 재난상황실 24시간 상황체계 유지 : 주·야간 3명

❍ 재난 종류·상황별 유관기관 협조체제 구축

- 핫라인 구축 : 안전건설과 ↔ 산청경찰서 ↔ 산청소방서

▪ 재난발생 즉시 연락

- 재난관리책임기관 실무담당자 및 현장책임자 비상연락망 정비

- 재난관리책임기관별 임무 및 역할 조정 간담회 실시

재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련실시

❍ 재난위기관리 점검 합동훈련 실시

- 재난대응 안전한국훈련, 긴급구조통제단 기동훈련 등

❍ 재난안전관련 표준행동매뉴얼 작성(정비)

-  안전관리계획 수립(유관기관 재난안전관리대책 포함) : 연 1회

-  사회·자연재난 현장조치 행동 매뉴얼 현행화 : 수시

❍ 부서별 재난안전 관리자·실무자 안전교육 실시 : 수시

3. 군민과 함께하는 생활안전문화 운동 활성화

역점

시책

생활안전을 위한 안전점검 활동 전개

❍「시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법」관련 1․2․3종 시설물       위험요인 정기점검 실시 : 2회(상․하반기)

- 대상 : 140개소(교량, 전통시장, 다중이용시설, 판매시설 등)

❍ 계절별 안전점검 실시 : 5회(설날, 해빙기, 우기전, 추석, 동절기)

❍ 축제 행사장 안전관리계획 심의 및 안전점검 실시 : 7회

❍ 국가안전대진단 실시

- 대상 : 7개 분야 264개소(공공시설 196개소, 민간시설 68개소)

- 내용 : 재난취약시설물 등 생활주변 주요 시설물 안전진단 실시

생활안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취

❍ 매월 안전점검의 날 행사 추진

- 안전의식 고취를 위한 민․관 합동 캠페인 전개 및 안전수칙 홍보

❍ 안전신문고 앱 설치 및 안전신고 방법 홍보 : 수시

- 생활주변 위험요소 사전 제거로 안전한 사회 만들기 문화 정착

4. 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비

역점

시책

군도 확·포장사업 추진

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 량 : 6개소 L=6.79km

❍ 사 업 비 : 2,860백만원(군비)

❍ 사업내용 : 군도15호 금서수철도로 확포장공사 외 5건

농어촌도로 확·포장사업 추진

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 량 : 20개소 L=21.04km

❍ 사 업 비 : 8,840백만원(군비)

❍ 사업내용 : 석대순환도로 확포장공사 외 19건

교량보수 및 기타도로사업

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.

❍ 사 업 량

- 도로주민숙원사업 : 21개소 3,620백만원

- 교량점검 및 보수 : 168개소 500백만원

- 도로유지 및 보수 : 6건 500백만원

❍ 사 업 비 : 4,620백만원(군비)

❍ 사업내용 : 주민편의를 위한 숙원사업, 교량점검 및 관내도로 유지                 관리사업

5. 안전하고 명품 관광 기능을 보유한 하천관리

역점

시책

안전한 하천유지관리사업

❍ 봄, 가을 하천제방 정비사업 실시 : 전읍·면 11개소

❍ 제방풀베기사업(춘추계) 11개소 실시

❍ 노후배수문 정비 및 유지관리

자연재난대비 및 명품 관광 기능을 보유한 하천정비

❍ 지방하천 유지관리사업

- 경호강 백리길(자전거도로)조성사업 외 15개소 지방하천시설 정비사업

❍ 소하천 유지관리사업

- 지정 소하천정비사업 외 15개소 소하천유지관리사업

❍ 국가하천 유지관리사업

- 산청군 관내 국가하천(남강)풀베기 및 유수지장목제거 등 시설물 유지 관리

퇴적물제거 및 유수지장목 제거

❍ 지방하천 11개소 하천퇴적물 제거

❍ 소하천 15개소 하천퇴적물 제거

❍ 효율적인 관리를 위한 단계적 유수지장목 제거사업 추진

6. 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

역점

시책

시군수리시설 개보수사업

❍ 위    치 : 산청군 단성면 길리, 금서면 신아리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 저수지 개보수 2개소

❍ 사 업 비 : 500백만원(균특 400, 도비 30, 군비 70)

- 길리저수지(250백만원), 가내실저수지(250백만원)

신연지구 소규모 배수개선사업(계속)

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2021. 12월

❍ 사 업 량 : 배수장 2개소, 배수로 6조 L=3.2km

❍ 사 업 비 : 6,000백만원(균특 4,800, 도비 360, 군비 840)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2019년		2020년		2021년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
신연지구	배수장 2개소	6,000	시행계획 보상1식	500	배수장 2개소	1,800	배수장 2개소	3,700	균특 80%, 도비 6% 군비 14%

신촌지구 소규모 용수개발사업(신규)

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 량 : 저수지 1개소, 용수로 L=2.0km

❍ 사 업 비 : 9,000백만원(균특 6,300, 도비 810, 군비 1,890)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2020년			2021년이후			비고
	사업량	사업비		사업량	사업비		사업량	사업비
신촌지구	저수지 1개소	9,000		시행계획 보상1식	1,000		저수지 1개소	8,000	균특 70%, 도비 9% 군비 21%

관정지구 기계화경작로 확포장사업

❍ 위    치 : 산청군 단성면 관정리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

❍ 사 업 량 : 기계화경작로 2.6km

❍ 사 업 비 : 400백만원(균특 280, 도비 36, 군비 84)

재해위험저수지 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 모고리 외 7개소 일원

❍ 사업기간 : 2015. 8월 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 량 : 재해위험저수지 정비 8개소

❍ 사 업 비 : 9,800백만원(국비 4,900, 도비 1,470, 군비 3,430)

(단위 : 백만원)

저수지명	합계		2019년까지		2020년		2021년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
합계	8건	9,800	6건	4,754	5건	1,536	4건	3,510	국비 50% 도비 15% 군비 35%
하양	제당54m	1,000	제당54m	1,000
강정	제당53m	500	제당53m	500
월곡	제당134m	1,800	제당134m	1,800
큰골	제당115m	700	제당115m	500	제당115m	200
배평전	제당159m	1,900	제당159m	870	제당159m	600	제당159m	430
왕촌	제당97m	1,900	설계1식	84	제당97m	600	제당97m	1,216
아미랑	제당129m	900			설계1식	68	제당129m	832
대현갈	제당103m	1,100			설계1식	68	제당103m	1,032

농업기반 주민숙원사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 외 10개면

❍ 사업기간 : 2020. 1 ~ 12월

❍ 사업량/사업비 : 읍면 주민숙원사업 161건 / 8,336백만원

❍ 기대효과 : 영농 기반 조성으로 오랜 주민숙원 해소

❍ 기    타 : 주민숙원사업은 군 전체 예산 범위내 시행계획

7. 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

역점

시책

법평 자연재해위험개선지구 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 가계리 일원

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2021. 12월

❍ 사 업 비 : 9,000백만원(국 4,500, 도 1,350, 군 3,150)

❍ 사 업 량 : 교량재가설 L=150m, 접속도로 L=250m

적벽산 급경사지 붕괴위험지역 정비

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 일원

❍ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 사 업 비 : 29,184백만원(국 14,592, 도 4,377, 군 10,215)

❍ 사 업 량 : 위험사면 정비 L=0.9km(피암터널 L=0.7km)

어서 급경사지 붕괴위험지역 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2020. 12월

❍ 사 업 비 : 4,400백만원(국 2,200, 도 660, 군 1,540)

❍ 사 업 량 : 위험도로사면 정비 L=0.4km

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업

군도 확포장공사

농어촌도로 확포장공사

교량보수 및 기타 도로사업

국도·지방도 건설사업 추진

지방하천 유지관리사업

국가하천 유지보수사업

지방하천 시설정비사업

소하천 유지관리사업

퇴적물 제거사업

남강댐 주변지역 지원사업

봉두지구 자연위험개선지구 정비사업

국가하천 및 지방하천사업 추진현황

오성 및 방곡지구 다목적용수개발사업

신연지구 소규모 배수개선사업

신촌, 일물 저수지 신설

법평 자연재해위험개선지구 정비사업

적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

1. 군도 확포장공사

❖ 관내 군도의 미개량 노선을 확포장하여 교통소통에 원활을 기하고

지역 간 접근성을 향상시켜 주민의 소득증진과 지역 균형 발전에

기여코자 함

추진방향

❍ 군도 정비계획에 의거 연차적으로 예산 확보 후 추진

❍ 계속사업은 집중투자로 조기 마무리토록 하고 신규사업은 주민

수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진

사업개요

사업명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총사업비	‘19까지	‘20년	‘21이후
계(6건)	L=6.79km	11,210	3,050	2,860	5,300
군도15호 금서수철도로 확포장공사	L=1.28km	4,500	2,000	1,000	1,500	계속
소둔철~갈전간도로 확포장공사	L=2.65km	5,000	1,000	1,000	3,000	신규
군도24호 신안마을 우회도로 개설공사	L=0.66km	1,250	50	400	800	신규
군도15호선 생초하촌지구외 1개지구 재포장공사	L=1.90km	160		160		신규
군도9호 유평지구 위험도로 선형개량사업	L=0.15km	150		150		신규
군도13호 내원지구 위험도로 선형개량사업	L=0.15km	150		150		신규

추진계획

❍ 신규사업 조사측량 및 실시설계 용역 : 2019.11월 ~ 2019.02월

❍ 신규 및 계속사업 착수 및 준공 : 2020.03월 ~ 2020.12월

기대효과

❍ 지역 간 교통망 확충으로 관광객 유치 극대화 및 지역개발 활성화

2. 농어촌도로 확포장공사

❖ 관내 도로 폭이 협소하거나 차량통행이 어려운 농어촌도로를 확

포장하여 차량통행에 따른 주민 불편사항을 해소하고 안전사고를

사전에 예방코자 함

추진방향

❍ 농어촌도로 정비계획에 의거 연차적으로 예산 확보 후 추진

❍ 차량통행에 따른 안전사고의 위험이 큰 지구부터 우선 추진

사업개요

❍ 사업명 : 중태~유점간도로 확포장공사외 20개소

❍ 사업량 : 도로확포장 L=21.04km

❍ 사업비 : 8,840백만원

추진계획

❍ 신규사업 조사측량 및 실시설계 용역 : 2019.11월 ~ 2020.02월

❍ 신규 및 계속사업 착수 및 준공 : 2020.03월 ~ 2020.12월

기대효과

❍ 농어촌도로 개량으로 주민불편 해소 및 낙후된 지역경제 활성화 기여

사업세부내역

사 업 명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총사업비	‘19까지	‘20년	‘21이후
계(20건)	L=21.04km	42,060	4,210	8,840	29,010
석대순환도로 확포장공사	L=1.27km	2,300	1,500	800
외송~내송간도로 확포장공사	L=0.81km	1,300	300	1,000
고치절골농로 확포장공사	L=1.1km	2,100	50	450	1,600
지막도로 확포장공사	L=1.2km	3,500	400	500	2,600
신안구담 버스진출입도로 정비공사	L=0.89km	1,800	600	500	700
교동~석대간도로 확포장공사	L=1.5km	4,100	200	900	3,000
내고~갈전간도로 확포장공사	L=1.22km	2,540	40	600	1,900
안봉진입도로 확포장공사	L=0.56km	830	30	200	600
원리~동신간도로 확포장공사	L=0.87km	2,400	100	1,100	1,200
특리마을 우회도로 개설공사	L=1.0km	1,900	50	500	1,350
신안곡소 버스진출입도로 정비공사	L=1.2km	1,900		100	1,800
시천남대 버스진출입도로 정비공사	L=1.0km	1,900		100	1,800
중태~유점간(2지구)도로 확포장공사	L=1.2km	1,900		100	1,800
단성소리당도로 확포장공사	L=1.5km	1,850		50	1,800
만안도로 확포장공사	L=0.42km	300		300
오부소룡산 진입도로 확포장공사	L=0.4km	640		40	600
삼장서당지구 도로확포장공사	L=0.5km	500		500
오부중매~압수간도로 확포장공사	L=0.7km	1,060		60	1,000
산청내정지구 도로확포장공사	L=0.7km	740		40	700
중산~내대간도로 확포장공사	L=3.0km	8,500	940	1,000	6,560

3. 교량보수 및 기타도로사업

❖ 관내 교량에 대한 정밀점검 및 안전점검결과에 따라 유지보수를

시행하여 안전사고를 사전에 예방하고 군도 및 농어촌도로 시설물

등을 정비하여 도로유지 관리에 만전을 기하고자 함

추진방향

❍ 교량 정밀점검 및 안전점검 결과에 따라 교량 보수․보강 추진

❍ 군도 및 농어촌도로 상 사고위험 요소가 있는 지구부터 우선 추진

사업개요

❍ 사업명 : 구아마을 진입도로 확포장공사외

❍ 사업량

- 주민숙원사업 21건/3,620백만원

- 도로유지관리사업 6건/500백만원

- 교량관리사업 4건/500백만원

추진계획

❍ 조사측량 및 실시설계 용역 : 2020.01월 ~ 2020.02월

❍ 사업착수 및 준공 : 2020.03월 ~ 2020.12월

기대효과

❍ 도로시설물 유지관리로 안전사고 예방 및 주민불편사항 해소

❍ 주민숙원사업 시행으로 편의 증진 및 지역경제 활성화 기여

사업세부내역

구분	사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	비 고
계	31건		4,620
교량관리사업	교량정밀점검	6개소	60
	교량안전점검	156개소	60
	교량유지보수	6개소	380	점검결과에 따라 보수
도로유지 관리사업	군도,농촌도 차선도색사업	L=90km	100
	군도,농촌도 소파보수사업	5개노선	100
	상반기 도로변 풀베기사업	L=200km	100
	도로재해위험지 보수	4개소	100
	도로시설 긴급장비대	1식	50
	미불용지 보상금지급	10필지	50
주민숙원사업	구아마을 진입도로 확포장공사	L=0.6km	200
	단성중촌농로 확포장공사	L=0.5km	900
	내리지성마을 도로확포장공사	L=0.8km	600
	산청내리지구 보도설치공사	L=1.0km	400
	물산도로 배수로 정비공사	8개소	100
	삼장내원지구 도로 배수개선사업	L=0.2km	40
	궁소진입도로 확포장공사	L=0.12km	150
	시천중태지구외 도로재포장공사	L=3.3km	250
	산청부리지구외 도로재포장공사	L=1.2km	80
	시천신촌지구 도로측구 개선공사	L=0.04km	10
	법물~관이간도로 재포장공사	L=2.5km	140
	장란지구 보도설치공사	L=0.4km	200
	단성리도205호 재포장공사	L=1.2km	70
	생초리도209호 재포장공사	L=0.1km	60
	오부중촌 배수로 정비공사	L=0.15km	30
	군도29호 창안지구 배수로 정비공사	L=0.05km	50
	산청지곡도로 배수로 정비공사	L=0.2km	40
	생초리도214호 도로정비공사	2개소	100
	손항~율현간도로 재포장공사	L=1.3km	70
	생초리도201호 도로정비공사	1개소	100
	범학도로 배수로 및 가드레일 정비공사	L=0.2km	30

4. 국도․지방도 건설사업 추진

❖ 국도․지방도 건설사업 추진현황

삼장~산청 국도건설공사(밤머리재터널) 추진현황

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 홍계리~금서면 평촌리(국도59호선)

❍ 사 업 량 : L=6.0km(터널1개소 L=3.0km, 접속도로 L=3.0km)

❍ 사 업 비 : 98,300백만원(공사비 87,300백만원, 보상비 등 11,000백만원)

‘17년까지 : 290억, ’18년 : 123억, ‘19년이후 : 570억

❍ 사업기간 : 2016. 4. ~ 2023. 3.

❍ 추진사항

- 2011. 12. ~ 2013. 8. : 실시설계 용역 시행 및 완료

- 2016. 11. : 보상협의 추진

- 2017. 02. : 공사 착수

- 2017. 08. : 터널 굴착작업 착수

- 2018. 08. : 터널굴착 완료(L=3.0km)

- 2019. 09. : 터널 및 도로추진중(공정율 45%)

- 2023. 03. : 준공예정

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

❍ 시 공 사 : 금호산업(주), 롯데건설(주), ㈜한라

국도20호선『단성~시천간2』국도건설공사

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 ~ 길리

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=3.0km, B=19.5m

❍ 사 업 비 : 42,000백만원

❍ 추진사항

- 2016. 07 : 제4차 국도건설5개년계획 반영

- 2018. 09 : 실시설계용역 완료

- 2019. 12 : 행정절차이행

- 2020년 ~ 2023년 : 보상협의 및 공사추진

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

국도20호선『신안~생비량간』국도건설공사

❍ 위    치 : 산청군 단성면 강누리 ~ 생비량면 도리

❍ 사 업 량 : 도로확포장 L=9.2km, B=19.5m

❍ 사 업 비 : 151,300백만원

❍ 추진사항

- 2014. 07 : 실시설계용역 완료

- 2019. 02 : 예비타당성 면제 확정

- 2019. 12 : 사업적격성 심사 및 행정절차 이행

- 2020년 ~ 2023년 : 보상협의 및 공사추진

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

국지도60호선 선형개량공사 추진현황

❍ 산청군 금서면 매촌리 ~ 금서면 화계리

❍ 사업기간 : 2020년 이후

❍ 사 업 량 : L=8.88km, B=12.0m(기추진 5.68km, 향후계획 L=3.2km)

❍ 사 업 비 : 33,400백만원(기투자 15,100백만원, 향후 18,300백만원)

※ 용역비 : 945백만원

❍ 추진사항

- 2010. 02. ~ 2013. 08. : 금서면 매촌리~동의보감촌 구간 L=5.68km 시공완료

- 2013. 09. 06. : 잔여구간(L=3.2km) 제4차 국지도건설 5개년계획 반영요청

- 2015. 01. : 도지사 순방시 사업건의

- 2016. 09. : 국토부 제4차 국지도5개년 반영

- 2016. 12. : 실시설계용역 발주 공고

- 2017. 04. : 실시설계용역업체 선정

- 2017. 05. : 조사측량 및 실시설계 착수

※ 설계용역 기간 : 2017. 05. ~ 2019. 12.

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청 설계, 경상남도 시행

❍ 용 역 사 :  경호엔지니어링(서울 소재)

5. 지방하천유지관리사업

❖ 지방하천 중 기성제 정비, 노후배수문 정비 및 준설사업이 필요한 하천에 대하여 사업 시행하여 군민의 재산보호 및 수해피해 예방

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 신등면 장천리 외 10개소

❍ 사 업 량 : 11개소 / 하천정비 L=5.0km

❍ 사 업 비 : 300백만원(도 150, 군 150)

추진계획

❍ 2020.  1월 : 실시설계용역 시행

❍ 2020.  2월 : 사업 착수 및 읍․면 사업비 교부

❍ 2020.  6월 : 사업 준공 및 정산시행

기대효과

❍ 지방하천 정비를 통한 수해피해 사전예방 및 재산 보호

사업세부내역

구 분		사업량(km)	사업비(백만원)	비고
총 계		1식	300
군시행	소리당소하천 정비사업	0.3	30	신규
	물산소하천정비사업(보상)	1식	30	신규
	곡점 소하천정비사업	0.2	30	신규
	신안 소하천정비사업	0.15	30	신규
읍면시행	정곡천 하천유지관리사업	0.1	30	신규
	남사천 하천유지관리사업	0.1	30	신규
	상법천 하천유지관리사업	0.1	30	신규
	양천 하천유지관리사업	0.1	30	신규
	생초천 하천유지관리사업	0.1	30	신규
	시천천 하천유지관리사업	0.1	30	신규

6. 국가하천 유지보수사업

❖ 우리 군 관내 국가하천(남강)에 대하여 하천퇴적물 제거 및 유수지장목 제거와 풀베기 정비작업을 통해 효율적 국가하천유지를 관리하고자함

추진방향

❍ 국가하천 제방의 정비(풀베기작업)작업우선 제거 실시

❍ 퇴적물 제거사업 및 하천시설물 유지보수사업 병행 시행

❍ 시특법 상 필요한 정밀점검용역 시행(제방 및 통관박스 시설물)

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 남강 국가하천

❍ 사 업 량 : 퇴적물 제거, 유수지장목 제거 1식 및 하천시설물 정비

제방 및 통관박스 시설물 정밀점검용역 1식

❍ 사 업 비 : 250백만원(국비 250)

추진계획

❍ 퇴적물 및 지장목 제거대상지 조사 : 2020. 1 ~ 2월

❍ 정밀점검용역 및 사업시행 : 2020. 3월

❍ 사업준공 : 2020. 6월

기대효과

❍ 하천퇴적물제거 작업으로 인한 인근 농경지 및 재해 방지

❍ 국가하천의 효율적 시설물 관리 및 유지관리성 제고

7. 지방하천 시설정비사업

❖ 경호강 백리길 조성사업 등을 포함하여 미 정비된 지방하천에 대하여 본 사업을 통해 시설정비하여 자연재해 예방과 효율적인 지방하천 관리에 기여하고자 함

사 업 개 요

❍ 위    치  : 산청군 단성면 소남리 외 15개소

❍ 사 업 량 : 경호강 백리길 조성 L=10.5㎞ 및 하천정비 1식

❍ 사 업 비 : 5,150백만원(도비 1,400, 군비 3,750)

추진계획

❍ 2020.  1월 : 실시설계용역 시행

❍ 2020.  3월 : 사업추진 및 착수

❍ 2020.  6월 : 사업준공

기대효과

❍ 자전거도로 조성으로 명품산청 이미지 제고 및 효율적 하천관리

❍ 자연재해 예방 및 사유재산 보호

사업세부내역

구 분		사업량(km)	사업비(백만원)	비고
계		1식	5,150
군시행 (보조사업)	남사천(남사지구)일반하천정비사업	0.8	800	신규
	경호강백리길(자전거도로)조성사업	10.5	1,000	신규
군시행 (자체사업)	양천(엄혜산)생태길조성 전기공사	1.5	500	신규
	양천(하정지구)제방 보강공사	1.0	300	신규
	도리천(도리지구)제방설치공사 외	1식	2,440	신규
읍면시행 (자체사업)
	오봉천 정비공사	0.1	50	신규
	시천천(상지지구)둑마루정비공사	0.3	30	신규
	양천(대둔지구)둑마루정비공사	0.7	30	신규

8. 소하천 유지관리사업

❖ 우리 관내 소하천정비기본계획에 따라 미 정비된 소하천에 대하여 본 사업을 통해 정비하여 군민의 재산보호 및 수해피해 예방

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 차황면 양곡리 외 17개소

❍ 사 업 량 : 18개소 / 소하천정비 1식

❍ 사 업 비 : 3,660백만원(균특 424, 군 3,236)

추진계획

❍ 2020.  1월 : 실시설계용역 시행

❍ 2020.  3월 : 사업추진 및 착수

❍ 2020.  6월 : 사업준공

기대효과

❍ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

❍ 소하천정비를 통한 하천의 효율적인 관리

사업세부내역

구 분		사업량(km)	사업비(백만원)	비고
총 계		1식	3,660
계		1식	848
군시행 (보조사업)	지정 소하천 정비사업	1.3	848	마무리
계		1식	2,812
군시행 (자체사업)	사리 소하천정비공사	1식	500	신규
	양곡 소하천 정비공사	1식	250	신규
	변석골 소하천 정비공사	1식	300	신규
	홍계 소하천 정비공사 외 10개	1식	1,242	신규
읍면시행 (자체사업)	어천 소하천정비공사	1식	100	신규
	금곡 수리미골 소하천정비공사	1식	100	신규
	수철 소하천 박스교 설치공사	1식	60	신규
	내원 소하천 정비공사	1식	80	신규
	제보 소하천 둑방길 포장공사	1식	80	신규
	내평 오전소하천 정비공사	1식	100	신규

9. 퇴적물 제거사업

❖ 하천구역 내 퇴적된 퇴적물 및 유수지장목을 제거하여 우기 시

하천재해의 위험요인을 제거하여 자연재난 피해를 예방하여 지역주민의 재산권을 보호하고자함

추진방향

❍ 수해로 인하여 하상이 숭상된 지역 우선 제거 실시

❍ 퇴적물 제거사업과 병행하여 하도개량(물길 돌리기)사업 실시

❍ 하천 내 퇴적을 유발하는 유수 지장목 동시 제거 추진

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 관내 하천

❍ 사 업 량 : 퇴적물 제거 A=120,000㎡, 유수지장목 제거 1식

❍ 사 업 비 : 1,000백만원(군비 1,000)

❍ 사업내용 : 퇴적물 제거 및 유수지장목 제거

추진계획

❍ 퇴적물 및 지장목 제거대상지 조사 : 2020. 1 ~ 2월

❍ 사업시행 : 2020. 3월

❍ 사업준공 : 2020. 06월

기대효과

❍ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

❍ 하천의 효율적 유지관리성 제고

10. 남강댐 주변지역 지원사업

❖ 우리 군 수변구역인 단성면 및 신안면에 지역주민의 건의사항에

대하여 본 사업을 시행하여 장기적인 편익을 제공하고자함

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 단성면 및 신안면

❍ 사 업 량 : 지역개발사업 1식

❍ 사 업 비 : 200백만원(국비 200)

❍ 사업내용 : 콘크리트포장, 마을회관 정비 및 물품 구입

추진계획

❍ 2020.  1월 : 남강지사로부터 사업승인

❍ 2020.  2월 : 단성면 및 신안면 사업비 재교부

❍ 2020.  6월 : 사업준공

기대효과

❍ 수변직역 정비를 통한 친화적인깨끗한 환경 조성

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 해소

11. 봉두지구 자연위험개선지구 정비사업

❖ 집중호우 발생 시 양천 및 봉두천의 수위상승에 따른 주거지 및

농경지 침수방지와 자연재해위험을 사전에 방지하고자함

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 생비량면 도리 일원

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=0.83km

❍ 사 업 비 : 4,700백만원(국비 750, 도비 225, 군비 525)

❍ 사업내용 : 하천정비 L=0.83Km , 배수로 정비 L=540m 및 배수펌프장 1개소

그간 추진사항

❍ 2018.  1월 : 자연재해위험개선지구 지정

❍ 2019.  1월 : 기본조사 및 실시설계용역 시행

❍ 2019. 10월 : 중앙 사전설계심의 및 비관리청 하천공사 협의

추진계획                                   (단위:백만원)

구분	계	2019	2020	2021	2022	비고
사업비	4,700	200	1,500	1,500	1,500
사업량	L=5.1km	실시설계 용역	하천정비 L=0.83㎞	배수펌프장	배수로 L=540m

기대효과

❍ 통수 단면 확보로 제방 보호 및 침수 등 수해피해 재발방지

❍ 자연재난 방지 및 지역주민의 사유 재산권 보호

12. 국가하천 및 지방하천 사업 추진현황

❖ 국가하천 및 지방하천 사업 추진현황

남강(산청지구)하천환경 정비사업

❍ 위    치 : 산청군 산청읍, 오부면, 금서면 일원

❍ 사업기간 : 2015. 10 ~ 2019.12 (20.6월 연장계획)

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=5.59km(양촌제 L=1.04km, 특리제 L=1.84km, 차탄제 L=1.63km, 옥산제 L=0.58km, 내리2제 L=0.5km)

❍ 사 업 비 : 240.71억원 (현공정율 90%)

❍ 준공계획 : 2020. 06월경 준공

(단위 : 억원)

합 계		2019까지		2020년 시행		2021년		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=5.59㎞	240.71	하천정비 L=4.13㎞	171.98	하천정비 L=1.46㎞	68.73

남강(산청지구)하천환경 정비사업

❍ 사업구분 : 남강(국가하천)

❍ 위    치 : 생초면 갈전리 ~ 산청읍 차탄리 일원

❍ 사업기간 : 2016. 8.16 ~ 2020. 07.25

❍ 사 업 량 : 전체 L=14.52km(하천환경정비 1개소, 교량1개소등)

❍ 사 업 비 : 231.64억원 (현공정율 57%)

❍ 준공계획 : 2020. 10월경 준공

(단위 : 억원)

합 계		2019 까지		2020년 시행		2021년		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=14,52㎞	231.64	교량 1개 하천정비 L=8.52㎞	200.48	하천정비 L=6.0㎞	31.16

남강(방목지구)하천환경 정비사업

❍ 사업구분 : 남강(국가하천)

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 범학리 ~ 신안면 하정리

❍ 사업기간 : 2019. 3 ~ 2023. 6

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=12.99km

(하천환경정비 7개소 125,620㎡, 하천정비 2개소 7,210㎡)

❍ 사 업 비 : 250억원(공사비 162억, 보상비 88억)

❍ 투자계획

(단위 : 억원)

합 계		2019까지		2020년 시행		2021년		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=12.99㎞	250.0	사업착공	45.0	보상협의하천정비 L=2.50㎞	50	하천정비 L=10.49㎞	155

금서지구 하천재해예방사업

❍ 사업구분 : 금서천(지방하천)

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 ~ 향양리

❍ 사업기간 : 2019.12월 ~ 2019. 08월(현재 실시설계 중)

❍ 사 업 량 : 하천정비 L=3.90km

(교량재가설  6개소, 축제 및 보축 12개지구)

❍ 사 업 비 : 180억원

❍ 투자계획

(단위 : 억원)

합 계		2019년 까지		2020 시행		2021년		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=3.90㎞	180.0	실시설계	5.0	보상협의하천정비 L=1.2㎞	54.0	하천정비 L=2.7	141.0

13. 오성 및 방곡지구 다목적용수개발사업

❖ 농업용수 부족으로 매년 한발을 겪고 있는 상습 한해지역에 대하여

농업 용수원을 개발하여 안정적인 용수공급

추진방향

❍ 한국농어촌공사 시행 전액 국비사업으로 산청 북부권역 한해 해소를

위한 용수 개발

❍ 한국농어촌공사 진주·산청지사 시행

사업개요

구분	위치	수혜면적	총사업비 (2020년도)	사업량	비고
오성지구	오부면 방곡리	77.5ha	18,304백만원 (3,500백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 1개소 용수로 7조 L=7.1km
방곡지구	금서면 방곡리	345ha	44,611백만원 (5,500백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 5조 L=9.8km

그간 추진사항

❍ 오성지구

- 시행계획 승인 : 2018. 6월

- 공사 착공     : 2017. 9월(현 진도율 : 50%)

❍ 방곡지구

- 시행계획 승인 : 2015. 6월

- 공사 착공     : 2015. 9월(현 진도율 : 60%)

추진계획

❍ 오성지구 : 공사 시행 및 보상협의( 2017. 9월 ~ 2023. 12월)

❍ 방곡지구 : 공사 시행 및 보상협의( 2015. 9월 ~ 2020. 12월)

기대효과

❍ 안정적인 용수 공급으로 주민 우심 해소 및 농가 소득 증대

14. 신연지구 소규모 배수개선사업

❖ 생초면 신연지구는 배수 본천인 남강 및 생초천 만수위시 내수

배제 불량으로 매년 침수 피해가 발생하는 지구로 배수개선사업을

통한 재해예방

추진방향

❍ 생초면 신연지구 상습 침수위험 해소를 위한 배수개선사업 추진

❍ 주민 불편 최소화를 조기 예산 확보 및 사업 준공

사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 1월~ 2021. 12월

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사 업 량 : 배수장 2개소, 배수로 L=1,110m

❍ 사 업 비 : 6,000백만원(지특 4,800, 도비 360, 군비 840)

❍ 사업내용 : 배수장 신설 1식(수혜면적 35ha, 유역면적 235ha)

※ 신연구역 Q=5.0㎥/S, 송정구역 Q=3.0㎥/S

그간 추진사항

❍ 2018. 3월 : 예정지 조사 및 기본계획

❍ 2018. 5월 : 소규모 배수개선사업 신규지구 반영(농림부)

❍ 2019. 1 ~ 12월 : 시행계획 수립 및 실시설계 용역

추진계획

❍ 2020.  1월    : 시행계획 검토 및 승인(경상남도)

❍ 2020.  1월    : 주민설명회 및 공사 착공

❍ 2023. 12월    : 공사 준공

기대효과

❍ 상습 침수지역 배수개선을 통해 주민생활 안정 및 안전 영농실현으로 지역경제 활성화 도모

15. 신촌, 일물 저수지 신설

❖ 최근 강수량 감소 및 지표수 부족에 따른 농업용수 부족으로 가뭄

피해가 발생하는 지역에 대하여 저수지를 신설하여 안정적인 농업

용수 확보

추진방향

❍ 농업용수 부족으로 가뭄 피해가 우려되는 지역에 농업용 저수지 신설

❍ 사업 반영 및 조속 추진을 위한 관련부처(농림축산식품부)사업 탄력적 추진

사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 1월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 차황면 법평리 신촌, 오부면 일물리 일물마을 일원

❍ 사 업 량 : 저수지 2개, 용수로 L=4.0km

❍ 사 업 비 : 14,000백만원(국비 9,800, 도비 1,260, 군비 2,940)

❍ 사업내용 : 신촌지구(11만톤, 9,000백만원), 일물지구(8만톤, 5,000백만원)

❍ 관련사업 : 신촌지구(일반농촌개발사업 소규모농촌용수개발사업추진)

일물지구(일반농촌개발사업 지표수보강개발사업추진)

※ 차황면 장박지구는 산림녹지과에서 별도 추진

그간 추진사항

❍ 2018. 4월 : 신촌 및 일물지구 상습가뭄재해지구 대상지 제출

❍ 2018. 5월 : 대상지 현장 확인(행안부)

❍ 2018. 10월 ~ 2019. 3월 : 신촌 및 일물지구 기본 조사 용역 완료

❍ 2019. 1월 : 경상남도 농업정책과 방문 사업 건의

❍ 2019. 2월 : 신촌지구, 일물지구 일반농촌개발사업 신규지구 신청

추진계획

❍ 2020. 1월  ~ 12월 : 실시설계용역, 시행계획 수립 및 공고

❍ 2021. 1월  ~ 2022. 12월 : 공사 착공 및 준공

기대효과

❍ 저수지 신설을 통한 안전 영농기반 구축으로 가뭄 해소 및 농가 소득 증대

16. 법평 자연재해위험개선지구 정비사업

❖ 법평 잠수교는 교량높이가 계획 홍수위보다 낮아 집중호우 시 유수 흐름 지장 및 유송잡물 걸림 등으로 하천수위를 상승시켜 교량을 가설하여 인명 및 재산피해를 해소코자 함.

사업개요

❍ 위    치  : 산청군 생비량면 가계리  일원

❍ 사 업 비 : 9,000백만원(국비 4,500, 도비 1,350, 군비 3,150)

❍ 사업내용 : 교량재가설 L=150m, 접속도로 L=250m

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2021. 12.

그간 추진사항

❍ 2019.  1월 : 입덕문지구 자연재해위험개선지구 타당성조사 용역 착수

추진계획

❍ 2019.  11월 : 입덕문지구 자연재해위험개선지구 지정 및 타당성조사 완료

❍ 2020.  1월 : 기본조사 및 실시설계용역 시행

❍ 2020.  6월 : 공사 착공

기대효과

❍ 교량 재가설로 인명 및 재산피해 방지

17. 적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❖ 재해 발생 우려가 높은 급경사지 붕괴위험지구에 조속한 정비사업

추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경 조성

추진방향

❍ 급경사지 붕괴위험지구로 지정된 재해취약시설에 대한 조속한 정비

사업 시행으로 재해예방

❍ 재해로 인한 피해 최소화로 주민의 생명과 재산 보호

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 지내

❍ 사 업 비 : 29,184백만원(국비 14,592, 도비 4,378 군비 10,214)

❍ 사업내용 : 피암터널 700m, 낙석방지망 4,950㎡ 등

❍ 사업기간 : 2013. 1월 ~ 2021. 06월

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 시행 : 2013.  4. 12.(완료 2015.10.28)

❍ 사전설계검토 심의 확정 : 2014. 11. 14.

❍ 경상남도 건설기술심의 : 2018.  1. 27.

❍ 공사 및 건설사업관리용역 착수 : 2018. 6. 18.

추진계획

❍ 피암터널 및 포장 완료  : 2020. 12월

❍ 조경(터널 상부 성토) 및 부대공  : 2021. 01월 ~ 2021. 06월

❍ 공사 및 건설사업관리용역 준공예정 : 2021. 06월

기대효과

❍ 낙석발생에 따른 위험요소 해소 및 군민의 생명과 재산보호

Ⅵ. 신규(특수) 시책

범죄예방환경 도시조성 사업

버스진출입 불가마을 진입로 정비공사

1. 범죄예방환경 도시조성 사업

❖ 범죄사각지대 및 범죄발생우려지역(공중화장실[여성])에 대한 군민의

불안감을 해소하고 범죄예방환경을 조성하여 범죄를 사전에 예방하고자 함.

추진방향

❍ 범죄 사각지대 “지능형 CCTV”설치 및 범죄발생 우려지역 “공중화장실

비상벨” 설치로 안전 산청 구현

사업개요

❍ 사업위치 : 산청군 관내

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년(※도지사 공약사업과 연계하여 연차별 추진)

❍ 총사업비 : ‘20년 예산 : 92백만원(도 27.6(30%), 군 64.4(70%))

❍ 사업내용

- 범죄 사각지대 “지능형 CCTV”설치

가. 내용 : 폭력 등 주변 환경을 인식하여 관제센터에 즉시 통보

나. 방법 : 지능형 CCTV가 물체의 움직임 등 위험상황을 감지하여 관제센터로 송신, 관제센터에서 경찰에 대응조치

다. ‘20년 사업량 : 지능형 CCTV 서버 1대, CCTV 2대

라. 사업비 : 60백만원(도 18(30%), 군 42(70%)

- 범죄발생 우려지역 “공중화장실 비상벨” 설치

가. 내용 : 폭력 등 위급 상황시 공용 여성화장실에 설치된 비상벨을              눌러 상황전파

나. 방법 : 건물 외벽의 경광등 점멸 및 음성 경고방송으로 위급상황 전파, 건물입구 블랙박스 상시 녹화(7일분 정도 보존)

다. ‘20년 사업량 : 8개소, 32백만원(4백만원/개)

향후 추진계획

❍ 2020. 1월~3월 : 사업대상지 선정

❍ 2020. 4월~12월 : 사업추진 및 완료

기대효과

❍ 여성, 어린이 등 치안약자 보호와 범죄발생 우려지역에 대한 안전 확보

❍ 범죄로부터 군민들의 안전한 삶 기반 조성 기여

2. 버스진출입 불가마을 진입로 정비공사

❖ 마을진입로 협소로 버스 등 대형차량 통행이 불가하여 주민생활

불편이 큰 마을의 진입도로를 정비하여 주민불편사항을 해소하고

지역간 균형발전을 도모코자 함

추진방향

❍ 사업대상지에 대하여 연차별 예산확보 후 추진

❍ 군도, 농어촌도로 정비사업 등에 우선적으로 반영하여 추진

❍ 편입부지 동의 등 마을주민들의 협조 및 보상협의 의지가 높은

지구 우선 시행

사업개요

❍ 대 상 지 : 차황면 우사지구 외 11개소

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2024년

❍ 사 업 비 : 11,200백만원

(단위 : 백만원)

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1,185	2,080	1,500	2,000	1,500	1,500	1,600

❍ 사업내용 : 진입도로 확포장 12개소 L=7,720.0m, B=6.0m

(단위 : km)

2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
1.03	1.45	1.20	1.00	0.96	1.18	1.10

기대효과

❍ 주민불편사항 해소 및 지역 간 균형발전 도모

세부추진계획

시행 년도	읍면	마을	가구 /인구	시점	종점	연장 (m)	현폭 (m)	노선명	사업비 (백만원)	선정 사유
계				15개소		8,750			11,200
‘18년	소계			3개소		1.030			1,185
	차황	우사	29/54	우사리 산9	77-11	310	3.5	리도209	200	폭협소 굴곡도로
	오부	중매	40/87	내곡리 371-2	282-1	500	3.5	리도204	300	폭협소 굴곡도로
	삼장	신촌	16/31	대하리 553	545-1	220	3.5	농도301	685	폭협소 굴곡도로
‘19년	소계			5개소		2,280			2,080
	차황	우사	29/54	우사리 산9	77-11	310	3.5	리도209	500	폭협소 굴곡도로
	오부	중매	40/87	내곡리 371-2	282-1	500	3.5	리도204	700	폭협소 굴곡도로
	삼장	신촌	16/31	대하리 553	545-1	220	3.5	농도301	380	폭협소 굴곡도로
	신등	수청	20/40	양전리9	206	400	3.5	진입로	200	교행불가
	신안	구담	24/40	외고리 1109	산69	850	3.5	리도205	300	교행불가
‘20년	신안	곡소	27/48	소이리 589-39	526-1	1,200	3.5	리도204	1,500	교행불가
‘21년	시천	남대	92/166	내대리 1116	251-20	1,000	3.0	리도206	2,000	가구수 증 가
‘22년	신안	갈전 숲속	35/90	갈전리 179	152-31	960	4.0	군도29	1,500	가구수 증 가
‘23년	소계			2개소		1,180			1,500
	삼장	서당	38/68	덕교리 1041-2	626-1	330	3.5	농도304	500	가구수 증 가
	신안	태계	26/37	소이리 445-1	470-5	850	4.0	리214	1,000	기타
‘24년	소계			2개소		1,100			1,435
	차황	고황촌	20/35	상중리 633	211-1	500	3.5	진입로	700	기타
	신등	원계	30/45	양전리 622-2	810	600	3.0	군도29	735	기타