상 하 수 도 과

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	6

Ⅳ. 2020년도 주요업무계획	7

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업	13

Ⅵ. 신규(특수) 시책	31

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위 : 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
30		1	6	4	5	1	13

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
관리담당 (9명)	◦ 상수도특별회계 운영 ◦ 상수원 보호구역 관리 ◦ 지방상수도 시설물 및 원･정수 수질관리 ◦ 지방상수도 급․배수 및 누수관리 ◦ 상수도 대행업체 및 급수공사 관리 ◦ 상수도 요금 및 급수민원 접수․처리 ◦ 상하수도 요금부과･징수 및 체납사용료 관리 ◦ 저수조(물탱크) 청소업체 및 저수조 관리 ◦ 절수설비 및 냉․온수기 관리 ◦ 소규모 수도시설 원･정수 수질관리 ◦ 먹는물 공동시설(약수터) 시설 및 수질관리
상수도담당 (3명)	◦ 수도정비 기본계획 및 중･장기계획 수립 ◦ 상수도시설 확장 및 통ㆍ폐합사업 추진 ◦ 상수도 급수구역 확장사업 추진 ◦ 지방상수도 설치사업 추진 ◦ 노후관 교체사업 추진(누수율 제고사업 포함) ◦ 소규모 수도시설 설치 및 관리
하수도담당 (3명)	◦ 하수도 정비 기본계획및 중･장기계획 수립 ◦ 공공하수처리시설 설치사업 ◦ 하수관로 정비사업 추진 ◦ 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수처리장 확충사업 추진 ◦ 배수설비설치 신고 및 준공 ◦ 공공하수도 원인자부담금 부과 및 징수 ◦ 배수설비 대행업체 지정 및 승인 ◦ 단독정화조 설치신고 ◦ 오수처리시설 설치신고(변경) 및 준공검사 ◦ 오수,정화조 청소고지 및 과태료 부과 ◦ 오수처리시설 지도단속
시설운영담당 (8명)	◦ 지방상수도 취․정수장 운영 관리 ◦ 공공하수처리시설 운영 관리 ◦ 지방상수도 취․정수장 개선사업 ◦ 공공하수처리시설 개선사업 ◦ 하수도 민간위탁업체 관리 및 상수도 수질 관리 ◦ 시설물 안전점검(시특법 정기, 정밀점검)
수질개선담당 (7명)	◦ 수질개선 특별회계운영 ◦ 주민지원사업 추진 ◦ 낙동강수계기금 관련업무 ◦ 진양호 상수원보호구역 및 수변구역 관련업무 ◦ 지하수개발이용신고·허가 관리 및 수질측정망 운영 ◦ 친환경샛강살리기 조성사업

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

안정적인 수돗물 공급을 위한 기반 조성 및 유지관리

❍ 지방상수도 시설 확장 및 정비 : 7건 13,888백만원

- 생비량지구 지방상수도 인입공사 : 2,866백만원

- 산청급수구역 지방상수도 확장사업 : 1,143백만원

- 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 : 1,714백만원

- 시천급수구역 지방상수도 확장사업 : 971백만원

- 노후상수관망 정비사업(지방상수도 현대화사업) : 6,344백만원

- 산청 구 정수장 정비 및 신안 중촌배수지 증설 : 850백만원

❍ 소규모 수도시설 개보수 및 정비 : 2건 5,791백만원

- 소규모 수도 노후화 시설 개량 사업 : 857백만원

- 마을상수도 및 소규모 급수시설 유지관리 및 개보수 : 4,934백만원

상하수도 시설 증설 및 확장사업 추진 법적 근거 마련

❍ 수도 및 하수도정비 기본계획(변경) 환경부 승인(2019.2월)

❍ 지방상수도 확장계획(보급율 46.7% -> 98.3%)

- 산청, 단성, 시천급수구역 취·정수장 증설 및 급수구역 확장

- 투자계획 : 217,272백만원(기투자 25,388, 2020년 19,414 2020년이후 172,470백만원)

❍ 하수처리구역 확장계획(보급율 64.7% -> 92.1%)

- 산청, 신안·단성, 시천, 석대, 소규모 처리구역 처리장 증설 및 처리구역 확장

- 투자계획 : 314,110백만원(2020년 859, 2020년이후 313,251백만원)

2020년 하수도분야 예산 확보 : 4건(27,504백만원)

❍ 모고지구 : 7,991백만원(국비: 5,594, 지방비: 2,397)

- 하수관로 8.48km, 배수설비 287가구(558명), 맨홀펌프장 6개소

❍ 상법지구 : 4,425백만원(국비: 3,098, 지방비: 1,327)

- 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 3.47km, 배수설비 145가구(269명)

❍ 석대지구 : 12,652백만원(국비: 8,856, 지방비: 3,796)

- 하수처리장 신설 1,200톤

❍ 시천지구 : 2,436백만원(국비: 1,705, 지방비: 731)

- 공공하수처리장 증설 250톤

안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급 추진

❍ 원․정수 수질검사(지방상수도, 소규모 수도시설) : 45백만원

❍ 지방상수도 시설개선사업 : 350백만원

❍ 지방상수도 정수시설(여과공정) 기술진단 : 10백만원

❍ 지방상수도 침전지 및 배수지 청소 : 60백만원

하수처리 기반 확충 및 유지관리

❍ 공공하수도 기술진단 및 개선사업 : 185백만원

낙동강수계 주민지원사업 추진

❍ 소득증대사업 : 17건 184백만원

❍ 복지증진사업 : 55건 511백만원

❍ 오염정화물질지원 : 3건 10백만원

❍ 직접지원사업 : 907명 408백만원

❍ 특별지원사업 : 1건 270백만원

친환경 샛강 살리기 사업 추진

❍ 군 자체사업 : 11개소(산청읍 차탄리 외 21개소), 220백만원

- 22개소 사업완료(집행액 : 220백만원)

2. 과 제

상수도 수요 증가에 따른 시설 및 급수구역 조기 확장

❍ 수도정비기본계획(변경) 환경부 승인 지연으로 사업 추진이 부진하였으나, 2019년 2월 환경부 승인 완료됨에 따라 상수도 확장사업 본격 추진으로 주민 수요에 적극 대처

⇒ 산청 및 단성급수구역 지방상수도 확장사업 조기 착공

⇒ 원수 부족에 따른 단성 취·정수장 증설과 시천정수장 취수원 확보

⇒ 기시행중인 삼장 및 생비량지구 지방상수도 조기 완공

⇒ 비상취수원(청계저수지) 시설 확충 설계 및 행정절차 추진

상수관로 노후화에 대한 대책 마련

❍ 수도시설 노후화에 따른 수질악화, 단수, 누수 등 주민 피해 급증

❍ 재정상 문제로 관로 개량사업 지연되어 노후화 누적 및 가속

❍ 수도 경영 악순환으로 수도서비스 질 저하 및 주민 기초 생활권 위협

⇒ 상수도 관련 주민 요구 및 여론 수렴을 통한 정책사업 반영과 노후 관로 개선사업 신규 발굴 및 국도비 예산 확보 추진

하수도 시설확충 및 보급률 향상

❍ 신천지구 농촌마을 하수도 정비사업 조기 완공

❍ 2020년 사업 확정에 따른 시천·석대·모고·상법지구 농촌마을

하수도 정비사업 조기 착공

❍ 공공하수처리구역 확대 및 하수도 보급률 향상

친환경 샛강 살리기 조성사업 추진

❍ 사 업 량 : 읍·면 11개소

❍ 사 업 비 : 220백만원

❍ 사업내용 : 친환경 샛강조성, 지장물 제거(물버들 등), 오염토 준설, 수생식물(미나리 등) 식재, 환경정화활동.

낙동강수계 주민지원사업 추진

❍ 사 업 비 : 1,383백만원

❍ 간접지원사업 : 975백만원(소득증대사업:17건,복지증진사업:55건

오염물질 정화사업:3건)

❍ 직접지원사업 : 907명 408백만원

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
양질의 물공급과 깨끗한 수환경 조성으로 행복산청 실현

⇑

	4대 역점시책
수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰 제고 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상 안정적인 하수처리로 수자원 보전과 쾌적한 환경 조성 선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성

⇑

	역점시책별 이행과제
수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고 ◦ 안전하고 깨끗한 수돗물 생산․공급 ◦ 노후관망 정비 및 시설 현대화를 통한 안정적인 수도 공급 안정적인 수돗물 공급으로 군민 삶의 질 향상 ◦ 지방상수도 급수구역 확장 및 증설사업 추진 ◦ 지방상수도 개선 및 정비사업 지속추진 ◦ 소규모 수도시설 개량사업 추진 안정적인 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성 ◦ 공공하수처리시설 확충(증설) 및 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수도 시설물 정비 및 유지관리 추진 선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성 ◦ 낙동강수계 주민지원사업 추진 ◦ 친환경 샛강 살리기 조성사업

Ⅳ. 2020년도 주요업무계획

양질의 물  공급과 깨끗한 수환경

조성으로 행복산청 실현

수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰 제고

안정적인 수돗물 공급으로 군민 삶의 질 향상

안정적인 하수처리로 수질자원 보전과 쾌적한 환경 조성

□ 선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성

역점시책

1. 수도시설 관리 철저로 수도행정 신뢰도 제고

역점

시책

안전하고 깨끗한 수돗물 생산․공급

❍ 지방상수도 및 소규모 수도시설 원․정수 수질관리 : 45백만원

❍ 지방상수도 시설물 내부청소 : 60백만원

❍ 유량계 검교정 및 수질 자동측정기 정도검사 : 20백만원

❍ 지방상수도 시설물 정비사업 : 350백만원

노후관망 정비 및 시설 현대화를 통한 안정적인 수도 공급

❍ 사 업 명 : 노후상수관망 정비사업(지방상수도 현대화사업)

❍ 총사업비 : 25,097백만원(기투자 12,688,‘20년 7,530,‘21년 4,879)

※ 2020년도 : 7,530백만원(국비 3,765, 군비 3,765)

❍ 사업내용 : 관망정비 36.0km, 누수탐사 및 복구 835개소

블록시스템 및 유지관리 시스템 구축 1식

2. 안정적인 수돗물 공급으로 군민 삶의 질 향상

역점

시책

지방상수도 급수구역 확장 및 증설사업 추진

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장사업

- 총사업비 : 10,000백만원(기투자 2,858,‘20년 2,143,‘21년 4,999)

※ 2020년 : 2,143백만원(국비 1,500, 군비 643)
- 사 업 량 : 관로매설 L=49.0km, 가압장 4개소, 부대공 1식

- 사업기간 : 2017. 1 ~ 2021. 12

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

- 총사업비 : 25,360백만원(기투자 5,286,‘20년 1,429,‘21년이후 18,645)

※ 2020년 : 1,429백만원(국비 1,000, 군비 429)
- 사 업 량 : 정수장증설 1,600톤/일(4,100톤/일⇒5,700톤/일)

비상취수시설(청계) Q=4,200톤/일, 관로매설 L=74km 등

- 사업기간 : 2017. 1 ~ 2022. 12

❍ 시천급수구역 지방상수도 확장사업

- 총사업비 : 20,900백만원(기투자 2,435,‘20년 1,000,‘21년이후 17,465)

※ 2020년 : 1,000백만원(국비 700, 군비 300)
- 사 업 량 : 정수장 증설 Q=1,500톤/일(1,500톤/일→3,000톤/일)

삼장배수지 Q=300톤/일, 관로매설 L=69.7km, 가압장 1식 등

- 사업기간 : 2018. 1 ~ 2022. 12

지방상수도 개선 및 정비사업 지속추진

❍ 지방상수도 인입 및 개선사업

- 사 업 비 : 1,500백만원(군비 1,500)

- 사업내용 : 지방상수도 신규 인입 및 시설 개선(14개지구)

❍ 생비량지구 지방상수도 정비사업(마무리)

- 사 업 비 : 300백만원(군비 300)

- 사업내용 : 생비량지구 급수관로 및 포장 추가분 등 마무리

소규모 수도시설 개량사업 추진

❍ 소규모 수도 노후화시설 개량사업

- 사 업 비 : 1,000백만원(국비 700, 군비 300)

- 사업내용 : 노후 관로 교체, 시설(관정, 물탱크 등) 개량

❍ 소규모 수도시설 개보수 및 유지관리

- 사 업 비 : 4,077백만원(군비 4,077)

- 사업내용 : 읍면 마을상수도 개보수, 지하수 영향 및 사후관리 등 유지관리

3. 안정적인 하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성

역점

시책

공공 하수처리시설 확충 및 정비

❍ 신천지구 농촌마을 하수도 정비사업

- 총사업비 8,638백만원 (국비 5,624, 기금 1,446, 도비 482, 군비 1,086)

․ 2020년도 : 1,916.8백만원 (국비 1,230, 기금 476, 도비 105, 군비 105.8)

※ 하수처리장 90㎥/일, 하수관로 L = 12.3km

❍ 모고지구 하수관로 정비사업

- 총사업비 7,991백만원 (국비 5,594, 군비 799, 기금 1,598)

․ 2020년도 : 714백만원 (국비 500, 군비 214)

※ 하수관로 L = 8.4km

❍ 상법지구 하수관로 정비사업

- 총사업비 4,425백만원 (국비 3,098, 도비 265, 군비 265, 기금 797)

․ 2020년도 : 314백만원 (국비 220, 도비 47, 군비 47)

※ 하수처리장 70㎥/일, 하수관로 L = 3.9km

❍ 석대 공공하수처리시설 신설사업

- 총사업비 4,425백만원 (국비 3,098, 도비 265, 군비 265, 기금 797)

․ 2020년도 : 314백만원 (국비 220, 도비 47, 군비, 47)

※ 하수처리장 70㎥/일, 하수관로 L = 3.9km

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업

- 총사업비 2,436백만원 (국비 1,705, 도비 146, 군비 146, 기금 439)

․ 2020년도 : 429백만원(국비 300, 도비 64.5, 군비 64.5)

※ 하수처리장 증설 600㎥/일 → 850㎥/일 (250㎥/일 증설)

하수관로 정비 및 유지관리

❍ 하수관로 수선유지 및 긴급보수 : 400백만원(군비 400)

❍ 신천지구 하수관로 설치공사    : 2,562백만원(군비 2,562)

❍ 하수관로 기술진단 및 개선사업 : 580백만원(군비 580)

공공 하수처리시설 정비 및 유지관리

❍ 공공하수처리시설 유지보수 : 150백만원

❍ 하수처리시설 기술진단 및 개선사업 : 610백만원

❍ 공공하수도 통합관리센터 유지보수 용역 : 60백만원

❍ 공공하수처리시설 대행관리 용역 : 2,000백만원

4. 선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성

역점

시책

낙동강수계 주민지원사업 추진

❍ 사 업 비 : 1,116백만원

❍ 지원대상 : 5개읍‧면(산청, 금서, 시천, 단성, 신안)

❍ 사업내용

- 일반지원사업

·직접지원사업 : 재산규모에 따른 가구별 지원사업

·간접지원사업 : 소득증대사업, 복지증진사업 등

- 특별지원사업 : 공모사업으로 선정되어 추진하는 사업

❍ 낙동강수계관리위원회 사업계획 확정 : 2019. 12월

친환경 샛강 살리기 조성사업

❍ 사 업 비 : 220백만원

❍ 사업대상 : 11개 읍‧면 각 1개소

❍ 사업내용 : 친환경 샛강조성, 지장물 제거(물버들 등), 오염토 준설, 수생식물(미나리 등) 식재, 환경정화활동

❍ 사업계획 확정 : 2020. 1월 대상지 확정

❍ 사업추진 및 완료 : 2020. 2월 ~ 2020. 12.

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업

안심하고 마실수 있는 물공급 추진

산청급수구역 지방상수도 확장사업

단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

□ 시천급수구역 지방상수도 확장사업

□ 석대 공공하수처리시설 신설사업

□ 시천 공공하수처리시설 증설사업

신천지구 하수관로 설치공사

□ 안전하고 깨끗한 수돗물 생산․공급

□ 안정적인 하수처리로 쾌적한 생활환경 조성

상․하수도시설 정밀 안전점검

친환경 샛강 살리기 조성사업 구축

낙동강수계 주민지원사업 추진

지방상수도 수혜지역 확장

생비량지구 지방상수도 인입공사 조기마무리

모고지구 하수관로 정비공사

상법지구 공공하수도 정비사업

노후 상수관망 정비사업

1. 안심하고 마실 수 있는 물공급 추진

❖ 수질 및 수량관리와 시설개선 등을 통하여 보다 나은 서비스를 제공     함으로서 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급에 기여코자함

추진방향

❍ 지방상수도 누수저감 및 유수율 향상을 위한 노력 확대

❍ 수질관리가 취약한 소규모 수도시설에 대한 관리강화

사업개요

분야	공종		사업비(백만원)	비고
계			1,515.9
지방 상수도	노후 계량기 신설 및 교체공사		139.9
	급․배수관 수선(급수구역 전역)		800
	가압장∙유량계 등 유지보수		74
소규모 수도시설	원∙정수 수질검사(295개소)		197
	소독기 유지관리	필터교체 및 약품보충(295개소)	86
		투입기 교체(132개소)	133
	배수지(물탱크) 내부청소(291개소)		86

추진계획

❍ 유지 및 보수사업 착공 : ’20. 1월

❍ 사업 준공 : ’20. 12월

기대효과

❍ 수질 및 수량관리와 시설개선 등을 통해 수돗물에 대한 신뢰도

제고와 대민 서비스 향상에 기여

2. 산청급수구역 지방상수도 확장사업

❖ 산청·생초 통합 정수장 증설 사업 완료에 따라 수도정비기본계획에 의거      지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도 확장사업을 통하여      지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍, 오부면, 생초면, 금서면 일원

❍ 사 업 량 : 관로매설 L=49km, 가압장 4개소, 부대공 1식 등

❍ 사 업 비 : 10,000백만원(기투자 2,858,‘20년 2,143,‘21년 4,999)

※ 2020년 : 2,143백만원(국비(70%) 1,500, 군비(30%) 643)

❍ 사업내용 : 산청급수구역 확장에 따른 관로매설 등

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2021. 12

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 착수(총괄분, 1차분)      : 2017. 5월

❍ 조사측량 및 토질조사용역 착수        : 2017. 12월

❍ 실시설계용역 착수(2차분)              : 2018. 1월

❍ 수도정비기본계획(변경) 승인(환경부)   : 2019. 2월

❍ 행정절차, 인·허가 등 이행           : 2019. 9월

추진계획

❍ 실시설계용역 완료                    : 2019. 10월

❍ 공사 착공                            : 2019. 11월

❍ 공사 준공                            : 2021. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

3. 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

❖ 산청군 수도정비기본계획(변경)에 따라 지방상수도가 공급되지       않은 마을에 지방상수도를 공급하고 단성정수장 증설사업을 병행

추진하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 단성정수장 증설로 지방상수도 급수구역 확장

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면, 신안면, 신등면 일원

❍ 사 업 량 : 단성정수장 증설 Q=1,600톤/일(4,100톤/일→5,700톤/일)

비상취수시설(청계) Q=4,200톤/일, 관로매설 L=74km 등

❍ 사 업 비 : 25,360백만원(기투자 5,286,‘20년 1,429,‘21년이후 18,645)

※ 2020년 : 1,429백만원(국비(70%) 1,000 군비(30%) 429)

❍ 사업내용 : 취·정수장 증설, 단성급수구역 확장에 따른 관로매설 등

❍ 사업기간 : 2017. 1 ~ 2022. 12

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 착수(총괄분, 1차분)         : 2017. 5월

❍ 조사측량 및 토질조사용역 착수           : 2017. 12월

❍ 실시설계용역 착수(2차분)                 : 2018. 1월

❍ 수도정비기본계획(변경) 승인(환경부)       : 2019. 2월

❍ 행정절차, 인·허가 등 이행               : 2019. 9월

추진계획

❍ 실시설계용역 완료                        : 2019. 10월

❍ 공사 착공                                : 2019. 11월

❍ 비상취수원(청계저수지) 설계 및 사업 신청 : 2021. 4월

❍ 공사 준공                                : 2022. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

4. 시천급수구역 지방상수도 확장사업

❖ 시천·삼장면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질       불량 및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를       인입하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면, 삼장면 일원

❍ 사 업 량 : 시천정수장 증설 Q=1,500톤/일(1,500톤/일→3,000톤/일)

삼장배수지 Q=300톤/일, 관로매설 L=69.7km, 가압장 1식 등

❍ 사 업 비 : 20,900백만원(기투자 2,435,‘20년 1,000,‘21년이후 17,465)

※ 2020년 : 1,000백만원(국비(70%) 700, 군비(30%) 300)

❍ 사업내용 : 취·정수장 증설, 시천급수구역 확장에 따른 관로매설 등

❍ 사업기간 : 2018. 1 ~ 2023. 12

그간 추진사항

❍ 삼장1지구 공사 착공             : 2017. 12월

❍ 삼장1지구 공사 준공             : 2018. 10월

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립      : 2019. 2월

❍ 삼장2지구 설계 완료             : 2019. 5월

❍ 삼장2지구 총사업비 변경 협의    : 2019. 6월 ~ 9월

추진계획

❍ 삼장2지구 주민설명회 및 인허가  : 2019. 10월

❍ 삼장2지구 공사 착공             : 2019. 11월

❍ 시천지구 설계 및 사업 신청      : 2021. 4월

❍ 시천지구 공사 착공              : 2022. 1월

❍ 삼장2지구 공사 준공             : 2022. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

5. 석대 공공하수처리시설 신설사업

❖ 방목리 수산, 방목, 석대 마을에서 발생하는 생활하수의 미처리     방류에 따른  인근 상수원보호구역과 남강 등 공공수역의 오염이 심각한 바       하수처리시설 설치에 따른 공공수역의 수질오염방지와 도시환경 및 주민

보건 위생 개선에 기여하고자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 석대리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 3.9㎞, 배수설비 145가구

❍ 사 업 비 : 4,425백만원(국비 3,098, 도비 265, 군비 265, 기금 797)

※ 2020년예산 : 314백만원(국비 220, 도비 47, 군비 47)

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2022. 06.

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                        : 2019. 02.

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                           : 2020. 01.

❍ 실시설계용역 준공                           : 2020. 06.

❍ 공사 착공                                   : 2020. 06.

❍ 공사 준공                                   : 2022. 06.

기대효과

❍ 석대 공공하수처리시설 신설사업을 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

6. 시천 공공하수처리시설 증설사업

❖ 하수처리구역 확대등으로 하수량이 지속적으로 늘어남에 따라 부족한      공공하수처리시설의 용량을 증설 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민      보건향상에 기여코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 일원

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 증설 600톤/일→850톤/일 (250톤/일 증설)

❍ 사 업 비 : 2,436백만원(국비 1,705, 도비 146, 군비 146, 기금 439)

※ 2020년예산 : 429백만원(국비 300, 도비 64.5, 군비 64.5)

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2022. 06.

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                        : 2019. 02.

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                           : 2020. 01.

❍ 실시설계용역 완료                           : 2020. 06.

❍ 공사 착공                                   : 2020. 06.

❍ 공사 준공                                   : 2022. 06.

기대효과

❍ 부족한 처리용량의 증설을 통해 생활오수의 안정적 처리 및 양질의 수자원 확보등 쾌적한 주거환경 개선

7. 신천지구 하수관로 설치공사

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역사회의      건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 신천리, 동당리 일원

❍ 사 업 량 : 하수관로 L=4.0km

❍ 사 업 비 : 2,562백만원(군비 2,562)

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2020. 12.

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 착수                           : 2019. 03.

❍ 실시설계용역 완료                           : 2019. 07.

추진계획

❍ 공사 착공                                    : 2020. 01.

❍ 공사 준공                                    : 2020. 12.

기대효과

❍ 신천지구 하수관로 설치공사를 통해 생활오수의 안정적 처리로

양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

8. 안전하고 깨끗한 수돗물 생산‧공급

❖ 취‧정수시설 개‧보수로 맑고 깨끗한 수돗물 생산공급 기반체계 구축

❖ 수돗물 생산‧공급과정의 실시간 감시로 품질관리 및 신뢰성 향상

추진방향

❍ 효율적인 운영과 안적적인 시설관리로 맑고 깨끗한 수돗물 생산 공급

❍ 믿음과 신뢰가 있는 수돗물 이미지 개선

사업개요

❍ 정수장 기본현황

구분	산청생초	시천	단성	비고
위치	생초면 신연리	시천면 원리	단성면 강누리
시설용량(㎥/일)	5,500	1,500	4,100
취수원	하천복류수	계곡수+심정수+하천복류수	하천복류수
가동일시	2017. 1	2011. 2	2001. 8

❍ 사 업 비 : 510백만원

❍ 사업내용

- 상수도 정‧배수지 청소 용역 34개소 : 60백만원

- 취‧정수장 시설개선(산청생초정수장 외 1개소) : 175백만원

- 원격 감시제어 시스템 구축 : 50백만원

- 감시제어설비 유지관리 용역 : 20백만원

- 시천,단성정수장 정밀점검 개선사업 : 160백만원

- 수질검사 : 정기검사(일간, 주간, 월간, 분기) 및 수시검사 : 45백만원

- 신뢰 및 투명성 확보를 위해 수질검사 공개(신문, 홈페이지)

추진계획

❍ 정‧배수지 청소 용역 : 2020년 상‧하반기

❍ 수질검사 : 정기검사(일간, 주간, 월간, 분기) 및 수시검사 : 연중

❍ 시설개선사업 및 유지관리 용역 : 2020. 2월 ~ 6월

기대효과

❍ 안정적인 시설운영으로 맑고 깨끗한 수돗물 생산 공급체계 유지

❍ 수질검사 및 공정관리 철저로 수돗물의 이미지 제고

9. 안정적인 하수처리로 쾌적한 생활환경 조성

❖ 공공하수 및 소규모 하수처리시설 관리대행을 통하여 전문성 확보

❖ 효율적 하수시설 유지‧관리로 하천 수질보전과 쾌적한 주거환경 조성

추진방향

❍ 효율적인 운영과 안정적인 시설관리로 믿음과 신뢰가 있는 환경기초시설로의 이미지 제고

시설현황

❍ 사 업 량 : 산청공공하수처리시설외 49개소

총 계		500㎥/일이상		500㎥/일미만		비고
개소수	시설용량 (㎥/일)	개소수	시설용량 (㎥/일)	개소수	시설용량 (㎥/일)
50	9,474	3	6,200	47	3,274

❍ 사 업 비 : 2,970백만원

❍ 사업내용

- 하수처리시설 관리대행 용역(50개소) : 2,000백만원

- 하수처리시설 기술진단 용역(9개소) : 10백만원

- 하수슬러지 위탁처리 용역 : 300백만원

- 통합관리센터 유지보수 용역 : 60백만원

- 하수처리시설 기술진단 개선사업 : 600백만원

추진계획

❍ 공공 및 소규모하수처리시설 관리대행 용역 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 하수처리시설 기술진단 용역(9개소) : 2020. 2월 ~ 6월

❍ 하수슬러지 위탁처리 용역 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 통합관리센터 유지보수 용역 : 2020. 1월 ~ 12월

❍ 하수처리시설 기술진단 개선사업 추진 : 2020. 2월 ~ 6월

기대효과

❍ 노후화된 하수처리시설 개‧보수 사업으로 처리 효율성 증대

❍ 전문기관 관리대행 완벽한 하수처리로 쾌적한 생활환경 조성

10. 상‧하수도시설 정밀 안전점검

❖ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제12조 및「지진‧화산재해

대책법」제14조에 따라 상‧하수도 시설물에 대한 정밀안전점검   및 내진성능평가를 통하여 시설물 관리에 철저를 기하고자함

추진방향

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제12조에 따라 시기가 도래한 시설에 대해서는 정밀 안전점검을 실시하고,

❍「지진‧화산재해대책법」제14조에 따라 내진설계 대상시설 중 내진 성능 평가를 받지 않은 시설은 정밀 안전점검에 포함하여 실시

사업개요

❍ 사 업 량 : 공공하수처리시설 3개소, 정수장 2개소

구 분	지방상수도(정수장)			공공하수처리시설(하수처리장)			비고
시설명	산청‧생초	시천	단성	산청	시천	신안‧단성
시설용량(㎥/일)	5,500	1,500	4,100	3,800	600	1,800
준공년도	2017. 1	2011. 2	2001. 8	2004. 3	2011.12	2012. 1

❍ 사 업 비 : 50백만원

❍ 사업내용 : 정수장 및 공공하수처리시설 정밀점검(내진성능평가포함) 용역

추진계획

❍ 공공하수처리시설 및 정수장 정밀점검 용역 착공 : 2020. 2월

❍ 공공하수처리시설 및 정수장 정밀점검 용역 준공 : 2020. 6월

기대효과

❍ 시설물 정밀점검으로 기능과 안전 유지 및 재해‧재난 예방 기여

11. 친환경 샛강 살리기 조성사업 추진

❖ 생활하수, 가축분뇨, 쓰레기 등으로 훼손된 마을주변 도랑을 친환경적으로 복원 맑은 산청의 이미지 제고

❖ 물사랑 및 친환경 생활 실천의식 고취

추진방향

❍ 유수지장목 등의 제거로 도랑의 옛 모습 회복

❍ 주민 참여형 환경정화 활동 전개

❍ 지속적은 사후관리로 깨끗한 수생태계 유지관리

사업개요

❍ 위    치 : 11개 읍‧면

❍ 사 업 량 : 친환경샛강살리기 사업 11개소(읍‧면당 1개소)

❍ 사 업 비 : 220백만원

❍ 사업내용 : 친환경 샛강조성, 지장물 제거(물버들 등), 오염토 준설, 수생식물(미나리 등) 식재, 환경정화활동.

그간 추진사항

❍ 친환경 샛강 조성사업

- 2015년 ~ 2019년  : 55개소

추진계획

❍ 사업대상지 선정                              : 2020.  1월

❍ 사업 추진                               : 2020.  2월

❍ 사업완료                                : 2020. 12월

기대효과

❍ 깨끗한 하천 조성에 기여

❍ 지장물 제거 등 환경정화 활동으로 쾌적한 생활환경 조성

12. 낙동강수계 주민지원사업 추진

❖ 낙동강수계 상수원관리지역(상수원보호구역, 수변구역) 및 댐주변 지역에서 행위제한을 받고 있는 토지소유자 소득증대 및 생활환경개선을 위함

사업개요

❍ 위    치 : 5개 읍·면(산청읍, 금서면, 시천면, 단성면, 신안면)

❍ 사 업 비 : 1,116,294천원

계	일반지원사업			특별지원사업
	상수원보호구역	수변구역	댐주변지역
1,116,294	79,206	797,425	239,663	-

❍ 사업내용

- 일반지원사업

·직접지원사업 : 재산규모에 따른 가구별 지원사업

·간접지원사업 : 소득증대사업, 복지증진사업 등

- 특별지원사업 : 공모사업으로 선정되어 추진하는 사업

추진계획

❍ 가구 및 마을별 사업계획수립완료 :         : 2019.  10월

❍ 직접지원사업

- 대상자 조사 및 확정                    : 2019.  1월 ~ 2월

- 사업비 읍·면 재배정                   : 2019. 3월

- 가구별 사업비 집행                     : 2019. 3월 ~12월

❍ 간접지원사업 시행                       : 2019. 1월 ~12월

13. 지방상수도 수혜지역 확장

❖ 산청군내 지방상수도 미급수 지역의 원수 부족 및 수질 불량 등의      문제로 어려움이 있어 지방상수도 수혜지역 및 취·정수 시설 확장      통하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 수도정비 기본계획(변경) 수립을 통한 지방상수도 공급구역 확장으로 상수도 보급율 향상에 기여

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 량 : 정수장 증설(단성,시천), 배수지 설치(오부,삼장)

관로매설 120㎞, 가압장 및 감압변 설치 1식

❍ 사 업 비 : 46,224백만원(국비 32,356, 군비 13,868)

❍ 사업내용 : 지방상수도 수혜지역 및 시설 확장

❍ 사업기간 : 2018. 1 ~ 2022. 12

그간 추진사항

❍ 산청 및 단성급수구역 실시설계 용역 착수    : 2017. 5월

❍ 시천급수구역 확장사업 부분 준공(삼장1지구)  : 2018. 11월

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립                 : 2019. 2월

❍ 2020년 급수구역 확장사업 예산 신청         : 2019. 4월

❍ 단성취수장 집수매거 증설공사 착공          : 2019. 5월

❍ 시천급수구역(삼장2지구) 총사업비 변경 협의  : 2019. 6월 ~ 9월

추진계획

❍ 산청 및 단성급수구역 실시설계 용역 준공    : 2019. 10월

❍ 산청, 단성, 시천급수구역 공사 착공          : 2019. 11월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

❍ 지역간 균등급수 및 생활개선을 통한 지역균형발전 기여

14.생비량지구 지방상수도 인입공사 조기 마무리

❖ 소규모 수도시설에 의존하여 수질불량 및 원수 부족의 어려움을 겪고     있는 생비량지구에 지방상수도를 인입, 안정적이고 깨끗한 상수도      공급으로 주민 불편를 해소코자 함

추진방향

❍ 생비량지구 지방상수도 조기인입으로 안정적인 수돗물 공급과 주민편익 제공

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량 : 배수지(300톤/일) 1식, 관로매설 77.1km

가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

❍ 사 업 비 : 14,951백만원(국비 9,766, 군비 5,185)

❍ 사업내용 : 생비량지구 지방상수도 급수구역 확장

❍ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2020. 3

그간 추진사항

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 착공(총괄분)   : 2015. 12월

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 준공(1,2,3차분) : 2018. 10월

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 기성(4차분)    : 2019. 4월

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 타절 정산     : 2019. 5월 ~ 9월

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사(잔여분) 발주   : 2019. 9월

추진계획

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사(잔여분) 착공      : 2019. 10월

❍ 생비량지구 지방상수도 시운전 및 공사 준공     : 2020. 3월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

❍ 지방상수도 확장을 통한 기반시설 인프라 구축 및 인구유입 증대

15. 모고지구 하수관로 정비사업

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역사회의      건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 모고리(모고,운곡), 부리(외부,내부), 병정리(병정)

❍ 사 업 량 : 하수관로 8.4㎞, 배수설비 287가구, 맨홀펌프장 6개소

❍ 사 업 비 : 7,991백만원(국비 5,594, 군비 799, 기금 1,598)

※ 2020년예산 : 714백만원(국비 500, 군비 214)

❍ 사업기간 : 2020. 01. ~ 2022. 01.

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 착수                          : 2018. 07.

❍ 하수도 기본계획 승인                       : 2019. 02.

❍ 실시설계용역 준공                          : 2019. 06.

추진계획

❍ 공사 착공                                   : 2020. 01.

❍ 공사 준공                                   : 2022. 01.

기대효과

❍ 모고지구 하수관로 설치를 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

16. 상법지구 공공하수도 정비사업

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역사회의      건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치 : 차황면 상법리(상법), 법평리(신촌,만암)

❍ 사 업 량 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 3.9㎞ 배수설비 145가구

❍ 사 업 비 : 4,425백만원(국비 3,098, 도비 265, 군비 265, 기금 797)

※ 2020년예산 : 314백만원(국비 220, 도비 47, 군비 47)

❍ 사업기간 : 2020. 03. ~ 2022. 03.

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                       : 2019. 02.

❍ 실시설계용역 착수                          : 2018. 11.

❍ 실시설계용역 준공                          : 2019. 06.

추진계획

❍ 공사 착공                                  : 2020. 03.

❍ 공사 준공                                  : 2022. 03.

기대효과

❍ 상법지구 하수도 정비사업을 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및  쾌적한 주거환경 개선

17. 노후 상수관망 정비사업

❖ 노후상수관망 정비로 녹물 발생·이물질 유입예방 등 안전한 수돗물을      공급하고 누수 저감을 통한 유수율제고 향상 및 상수도 운영·관리의      선순환 구조를 구축하고자 함

추진방향

❍ 노후상수관망 정비사업을 통한 유수율(62.6% →85%) 제고

❍ 누수량 감소로 수돗물 생산비용 절감을 통한 경영수지개선

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사 업 량 : 관망정비 36.0km, 누수탐사 및 복구 835개소,

블록시스템 및 유지관리시스템 구축 1식

❍ 사 업 비 : 25,097백만원(기투자 12,688,‘20년 7,530,‘21년 4,879)

※ 2020년 : 7,530백만원(국비(50%) 3,765, 군비(50%) 3,765)

❍ 사업내용 : 블록구축, 관망정비 등 지방상수도 현대화사업

❍ 사업기간 : 2016. 10 ~ 2021. 12

그간 추진사항

❍ 위‧수탁 협약체결(산청군↔한국환경공단)  : 2016. 10월

❍ 기본설계 용역 준공                     : 2017. 9월

❍ 실시설계 및 관망관리 용역 착공         : 2017. 11월

❍ 누수탐사 및 복구공사 착공              : 2017. 12월

❍ 블록시스템 구축공사 착공               : 2018. 6월

❍ 유지관리시스템 구축공사 착공           : 2019. 6월

❍ 관망정비사업 착공                      : 2019. 9월

추진계획

❍ 블록시스템 구축공사 준공               : 2019. 10월

❍ 사업 전체 준공                         : 2021. 12월

기대효과

❍ 유수율 제고로 누수 저감 및 수돗물 생산비용 절감

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

Ⅵ. 신규(특수) 시책

옥내 급수관 누수탐사 무료서비스

1. 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스

❖ 옥내 급수관 누수지점 확인에 필요한 경제적 부담을 경감시켜 많은

주민들의 상수도 수리시행을 통해 유수율 높이고자 함

추진방향

❍ 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스 시행

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 급수구역 전체

❍ 사 업 량  : 200개소

❍ 사업기간 : 2020. 2월 ~ 2020. 11월

현    황

연 도	2014	2015	2016	2017	2018	비 고
유수율(%)	61.1	61.2	62.6	57.3	56.6
누수율(%)	37.9	30.7	33.4	39.1	39.4

문제점 및 대책

❍ 수도사용자의 가정내 누수로 인한 경제적 부담이 가중됨

⇒ 옥내 급수관 누수탐사 예산을 편성하여 무료서비스 시행

추진계획

❍ 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스 홍보실시 : 2020. 2월중

❍ 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스 사업시행 : 2020. 2 ~ 11월중

기대효과

❍ 옥내 누수탐사를 무료로 실시하여 주민의 경제적 부담을 덜어줌

❍ 신속한 행정처리에 따른 행정신뢰도 제고