안 전 건 설 과

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	9

Ⅳ. 2022년도 주요업무계획	11

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업	23

Ⅵ. 신규(특수) 시책	46

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위: 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
24		1	9	9	4	1

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
건설행정담당 (7명)	◦소규모 주민숙원사업 및 지역개발사업 ◦각종 건설사업장 편입물건 보상 및 등기 ◦전문건설업 및 골재 채취업 등록ㆍ관리 ◦국토교통부 소관 국유재산관리 ◦건설기계대여사업장 관리 및 조종사면허증, 검사과태료
안전관리담당 (3명)	◦안전 및 인적·사회적 재난관리 ◦안전관리기본계획수립 및 안전한국훈련 실시 ◦국가안전대진단 추진 및 여름철 물놀이 안전관리 ◦코로나-19 자가격리자 관리 등
도로담당 (4명)	◦도로중장기 계획 및 노선선정계획 ◦군도·농어촌도로 관리 및 정비 ◦교량 및 도로시설물 유지관리, 지역교통환경개선사업 추진 ◦도로점용 및 접도구역 관리, 도로사업보상 추진
하천담당 (3명)	◦하천(국가하천, 지방하천, 소하천) 관리 및 지도점검 ◦각종하천사업 설계, 지도감독 및 준공 ◦하천기본계획수립 및 하천사업 보상 ◦하천점사용 허가 및 공유재산 관리 등
농업기반담당 (3명)	◦농업기반정비사업 계획 수립 및 추진 ◦재해(한해) 대책 수립 및 복구 ◦수리시설(양·배수장, 저수지, 관정 등) 유지관리 ◦국유재산(농림부) 관리 및 사용허가
자연재난담당 (4명)	◦자연재난종합상황실 운영 및 관리 ◦재해위험지구 및 재해취약시설 점검 관리 ◦자연재난 조사 및 복구계획 수립 등 상황 종합관리

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

소규모 주민숙원사업 추진으로 주민편익 증대

❍ 사업실적                                      (단위 : 백만원)

구 분	총 사업계획		군 시행		읍ㆍ면 시행		비고
	건	사업비	건	사업비	건	사업비
합 계	174	8,579	41	3,435	133	5,144
마을진입도로 정비	76	4,454	17	2,166	59	2,288
농로 정비	78	3,260	13	784	65	2,476
세천 정비	12	490	5	180	7	310
다목적광장 조성	4	150	4	150	0	0
소교량 및 기타	4	225	2	155	2	70

공익사업의 효율적인 수행을 위한 토지 등 협의

❍ 손실보상 협의(2020. 12. 31. 현재)

- 부동산(토지, 건물) 보상: 804필지 284,521㎡, 7,887백만원

- 지장물 등 영농손실 보상: 436건 1,574백만원

자동확산소화기 설치 및 시설물 안전점검 실시로 재해와 재난예방

❍ 다중이용시설, 재난취약시설, 어린이 놀이시설 등 안전점검: 21회

❍ 화목보일러실 자동확산소화기 설치 800세대, 물놀이 관리지역 관리 20개소

코로나19 대응 산청군재난안전대책본부 설치·운영

❍ 운영목적: 코로나19 경계단계“심각”격상에 따른 상황관리

❍ 운영기간: 2020. 2. 1. ~ 상황종료 시 까지

❍ 주요구성

- 총괄조정관(안전건설과장), 통제관(건강관리과장), 담당관(감염병관리담당)

❍ 주요내용

- 코로나19 대응 종합상황실 운영(코로나19신고 등): 24시간 상황 유지

- 방역대책본부 운영: 선별진료소, 예방접종센터운영,

코로나19 방역수칙 종합점검추진단 구성 등

- 분야별 코로나19 방역 및 신고 대응: 주관부서 9개실과(협업반11실과)

- 코로나19 국내접촉 및 해외입국자 수송 및 자가격리 관리

도로(군도․농어촌도로) 확포장사업으로 군민의 공공복리 향상

❍ 정비현황

- 군도 정비사업: 4개소(4.93km/5,000백만원)

- 농어촌도로 정비사업: 8개소(10.97km/6,500백만원)

❍ 사업내용: 군도 및 농어촌도로 확포장

하천정비 및 유지관리사업으로 재해예방 및 하천환경개선

❍ 사업실적

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	하천 시설정비		하천유지관리		비 고
		건	사 업 비	건	사 업 비
국가하천 (남강)	406	2건	246	5개소	50	성능평가 및 안전점검용역
				3개소	110	유수지장목제거 및 제방풀베기
지방하천 (경호강 백리길 조성사업 외)	7,400	15건	5,200	11건	2,200	하천제방정비 하천퇴적물제거 유수지장목제거
소 하 천 (길리 소하천 외)	5,248	2건	4,248	10건	1,000	소하천 호안정비 기성제 유지관리 등
봉두지구 재해위험개선지구 정비사업	3,288	1건	3,288	-	-	자연재해 위험지구정비

경호강 백리길(자전거도로)조성사업으로 품격높은 문화환경 조성

❍ 구    간: 단성면 소남리 ~ 금서면 주상리 지내

❍ 사 업 량: 자전거도로조성 등 L=2.5km

❍ 사 업 비: 1,600백만원(도비 390, 군비 1,210)

❍ 사업기간: 2020. 2 ~ 2022. 12월

❍ 추진현황: 자전거도로(어천~범학지구) 공사 추진 중

❍ 향후계획: 2023년부터 단성면 소남~금서면 주상 자전거도로 운영

농업생산기반시설 정비를 통한 안전 영농기반 구축

❍ 사업실적                                      (단위: 백만원)

사 업 명	정 비 현 황		사업내용	비고
	사 업 량	사업비
합 계	8건	13,967
재해위험저수지 정비사업	재해위험저수지 정비 5개소	1,310	재해위험저수지 배평전, 왕촌, 아미랑, 대현갈, 점골저수지 정비
수리시설 지역 주민건의사업	용수로 정비 2개소	217	호리지구, 고치지구 용수로 정비
한해대비 용수 개발사업	관정개발 4개소, 저수지 준설 1개소	165	칠정지구, 우사지구, 수철지구, 방목지구 관정개발, 상골지구 준설
시군수리시설 개보수사업	노후배수장 증설 1개소	850	문대배수장 증설
소규모배수개선사업	배수장 3개소	2,800	신연지구, 묵곡지구, 용흥지구 소규모 배수 개선사업
소규모용수개발사업	저수지(신촌) 신설 1개소 용수로 L=2.0km	4,659	차황면 법평리 신촌지구 가뭄 우려지구 농업용수 확보
기계화경작로 확포장사업	경작로확포장 L=2.7km	400	산청군 관내 경작로 확포장
농업기반주민숙원 사업	용배수로, 농로 등 기반시설 정비 1식	3,566	산청읍 외 10개면 주민숙원사업

재해의 근원적 예방대책 사업 추진으로 군민의 생명과 재산보호

❍ 사업실적                                         (단위: 백만원)

사 업 명	위 치	정 비 현 황		비고
		사 업 량	사업비
합 계		16개소	140,478
생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업	생초면 어서리 일원	지방하천축제, 홍수방어벽, 교량 보 낙차공 개선, 우오수관로 배수펌프장 2개소, 도로숭상 등	42,000
법평 자연재해위험 개선지구 정비사업	생비량면 가계리 일원	- 교량재가설 2개소, 진입도로 270m (법평교 120m, 송계교 160m) 등	13,693
입덕문 자연재해위험 개선지구 정비사업	단성면 백운리 일원	- 하도개선 L=870m - 홍수방어벽 L=845m 등	9,733
단계(남단교) 자연재해 위험개선지구 정비사업	신등면 단계리 일원	교량재가설 L=65m 호안정비 L=300m 등	8,300	'22년 신규사업
신등(소이교) 자연재해 위험개선지구 정비사업	신안면 소이리 일원	교량재가설 L=136m 호안정비 L=600m 등	9,500	'22년 신규사업
적벽산 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	신안면 하정리 일원	- 위험도로사면 정비 L=934m - 피암터널설치 L=700m 등	29,184
어서지구 급경사지 붕괴위험지역 정비	생초면 어서리 일원	- 위험도로사면 정비 L=400m - 낙석방지망 A=4,400㎡ 등	4,400
신아 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	금서면 신아리 일원	위험도로사면 정비 L=200m 토사 1식, 기타부대공 1식 등	4,954
동당 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	시천면 중산리 일원	위험도로사면 정비 L=249m 낙석방지망 A=6,797㎡ 등	5,832
대현 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	오부면 대현리 일원	위험사면개량 L=340m 사면보호 A=5,100㎡ 등	5,632	'22년 신규사업
상법 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	차황면 상법리 일원	위험사면개량 L=100m 사면보호 A=1,500㎡ 등	3,000	'22년 신규사업
병정교 재가설공사	산청읍 병정리 일원	교량재가설 L=30m 도로개설 L=100m 등	1,700
내리 한밭마을 도로정비공사	산청읍 내리 일원	도로개설 L=500m 등	1,600
저호지구 조기경보 시스템 구축사업	단성면 호리 일원	조기경보시스템 구축 1식 등	350	'22년 신규사업
하정지구 조기경보 시스템 구축사업	신안면 하정리 일원	조기경보시스템 구축 1식 등	350	'22년 신규사업
원지강변 둔치주차장 침수위험 신속 알림 시스템 구축사업	신안면 하정리 일원	침수위험시스템 구축 1식 등	250	'22년 신규사업

2. 과 제

주민숙원사업 수요 증가에 따른 행정력 강화

❍ 해마다 주민숙원사업의 수요가 증가함에 따라 예산 확대 등 행정력 강화 필요

❍ 지역경제 활성화 및 군민 정주여건개선, 편의증진을 위한 소규모주민숙원사업 확대 시행

신속한 사업추진을 위한 손실보상 협의 적극 추진

❍ 공익사업의 원활한 추진과 조기 발주를 위해 적극적 협의 추진

❍ 매수 협의 불가한 토지 등에 대하여 토지수용 재결 추진

지역경제 활성화 및 군민 편의증진을 위한 도로건설 사업 시행

❍ 자체사업비로 추진함에 따라 사업기간 장기화 우려

- 장기 계속추진사업에 우선 투자하여 조기에 마무리함으로써 주민불편 최소화

- 신규사업은 주민수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 추진

- 주민건의사업 등 숙원해결 및 지역교통환경개선을 위한 사업 추진

재해예방 및 하천유지관리를 위한 하천준설 사업 시행

❍ 하천퇴적토 정비를 통한 재해위험요소 사전 제거 필요

- 매년 퇴적토 준설을 통해 재해위험을 제거하고자 하는 수요가 증가함에 따른 예산 확보 필요성 증가

- 하천범람우려로 인한 주민들의 겪는 안전 불감증 해소 요구와 지역 환경단체들의 하천 희귀 어종 보호를 위한 하천 정비 자제 요구가 상충되게 맞물려 있는 문제에 대한 협의안 강구 필요

재난 초기대응 기능 강화 필요

❍ 재난상황실 24시간 전담 공무원 배치로 신속한 재난대응체계 구축

재해예방 사업 추진

❍ 2022년 재해예방 신규사업 예산확보 및 조기 추진

❍ 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 추진

❍ 자연재난 취약시설의 근원적 해소를 위한 재해예방사업 추진

교량보수 및 기타 도로사업 추진

❍ 교량정밀점검 및 안전점검을 통하여 보수가 필요한 교량 정비

- 정밀점검대상 교량: 7개소

- 안전점검대상 교량: 168개소(2종 13개소, 3종 88개소, 기타 67개소)

- 교량관리사업: 안전점검 168개소 및 유지보수 7개소

❍ 관내도로의 안전시설, 배수로 등 미설치구간 정비 및 교통사고

위험요소가 있는 지구에 대해 우선적으로 정비

- 유지관리대상 도로: 217개 노선, 738.9km(국도 1개 노선 45.2km, 지방도

9개 노선 130.3km, 군도 20개 노선 225.2km, 농어촌도로 187개 노선 338.2km)

- 도로유지관리사업: 소파보수, 차선도색, 풀베기 등 20건(620백만원)

농업시설 노후 및 가뭄 확산에 따른 대책 마련

❍ 수리시설 노후 및 기능 저하에 따른 유지관리 수요 증가와 이상기후로 인해 지속적인 가뭄이 우려되고 있는 실정으로, 영농기 이전 수리시설 점검 및 보수를 위한 유지관리예산 확대 편성과 가뭄취약지역 저수지, 양수장, 관정 등 수원공 개발의 항구 대책 필요

❍ 2022년 사업계획

(단위: 백만원)

구분	합계	유지관리 (군)	유지관리 (농촌공사)	저수지 정 비	수원공 개 발	안전점검	비고
사업량	34개소	5개소	6개소	19개소	2개소	2개소
사업비	6,180	858	500	2,782	2,000	40

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
안전하고 편리한 사회기반시설 확충 및 정비

⇑

	7대 역점시책
소규모 주민숙원사업 확대 유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화 군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화 재해예방 및 관광자원 활용 하천관리 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

⇑

	역점시책별 이행과제
소규모 주민숙원사업 추진 ◦ 소규모 주민숙원사업 군 시행 읍·면 주민숙원사업 ◦ 읍·면 주민숙원사업 유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화 ◦ 24시간 재난대응상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축 ◦ 재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련 실시

□ 군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화

◦ 안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취

◦ 생활 접점형 군민 안전교육을 통해 재난발생시 대처능력 향상

□ 재해예방 및 관광자원 활용 하천관리

◦ 경호강 백리길 친수공간 조성사업

◦ 효율적 하천관리 및 관광자원 활용의 명품 하천 조성

◦ 안전한 하천유지관리사업 추진

□ 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

◦ 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

◦ 자연재해위험개선지구 정비사업(법평, 입덕문, 남단교, 소이교)

◦ 급경사지 붕괴위험지구 정비사업(신아, 동당, 대현, 상법)

◦ 조기경보시스템 구축사업(저호, 하정지구)

◦ 소규모공공시설 종합정비 계획수립 용역

□ 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비

◦ 군도 확·포장 사업 추진

◦ 농어촌도로 확·포장사업 추진

◦ 교량보수 및 기타 도로사업

□ 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

◦ 농업기반 주민숙원 사업

◦ 시군수리시설 개보수사업

◦ 소규모 배수개선사업

◦ 소규모 농촌용수개발사업

◦ 지표수 보강개발사업

◦ 기계화 경작로 확포장사업

◦ 재해위험저수지 정비사업

Ⅳ. 2022년도 주요업무계획

안전하고 편리한 사회기반시설 확충 및 정비

소규모 주민숙원사업 확대

유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화

군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화

재해예방 및 관광자원 활용 하천관리

자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비

안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

역점시책

1. 소규모 주민숙원사업 확대

역점

시책

소규모 주민숙원사업(군시행)

❍ 농촌주거환경 개선과 주민불편시설에 대한 정비사업 시행

- 위    치: 산청읍 외 10개면

- 사 업 량: 군 시행 30건

- 사 업 비: 4,678백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보                : '21. 10 ~ 12월

- 조사측량 및 설계                           : '21. 12 ~ '22.  2월

- 사업시행 및 준공                           : '22.  3 ~ '22. 12월

※ 소규모 주민숙원(군시행)사업은 사업비 1억원이상, 보상협의가

수반되는 사업을 읍면별 선정 후 군에서 사업시행

읍·면 주민숙원사업

❍ 농촌주거환경 개선 및 주민불편시설 중 소규모 읍면 자체 정비사업 시행

- 위    치: 산청읍 외 10개면

- 사 업 량 : 읍면시행 154건

- 사 업 비 : 5,832백만원

❍ 추진계획

- 사업대상지 선정 및 예산확보                : '21. 10 ~ 12월

- 조사측량 및 자체설계                       : '21. 12 ~ '22.  2월

- 사업시행 및 준공                           : '22. 3 ~  12월

※ 읍면 주민숙원사업은 합동 설계를 통한 자체설계로 예산절감 및

사업조기 발주

2.. 유기적인 재난대응체계 구축을 통한 재난대응 역량 강화

역점

시책

24시간 재난대응상황 체계 유지 및 유관기관 협조체제 구축

❍ 재난상황실 24시간 상황체계 유지: 주간 3명, 야간 2명

❍ 재난 종류·상황별 유관기관 협조체제 구축

- 핫라인 구축: 안전건설과 ↔ 산청경찰서 ↔ 산청소방서

▪ 재난발생 즉시 연락

- 재난관리책임기관 실무담당자 및 현장책임자 비상연락망 정비

- 재난관리책임기관별 임무 및 역할 조정 간담회 실시

재난대응 역량 강화를 위한 점검 및 훈련실시

❍ 재난위기관리 점검 합동훈련 실시

- 재난대응 안전한국훈련, 긴급구조통제단 기동훈련 등

❍ 재난안전관련 표준행동매뉴얼 작성(정비)

-  안전관리계획 수립(유관기관 재난안전관리대책 포함): 연 1회

-  사회·자연재난 현장조치 행동 매뉴얼 현행화: 수시

❍ 부서별 재난안전 관리자·실무자 안전교육 실시: 수시

3. 군민을 위한 생활안전문화 정착 및 안전교육 강화

역점

시책

생활안전문화 운동 추진으로 군민 안전의식 고취

❍ 「시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법」관련 1ㆍ2ㆍ3종

시설물 위험요인 정기점검 실시: 2회(상ㆍ하반기)

- 대 상: 140개소(교량, 전통시장, 다중이용시설, 판매시설 등)

❍ 계절별 안전점검 실시: 5회(설날, 해빙기, 우기 전, 추석, 동절기)

❍ 축제 행사장 안전관리계획 심의 및 안전점검 실시: 6회

❍ 국가안전대진단 실시

- 대 상: 22개 분야 243개소(공공 155, 민간 88)

- 내 용: 재난취약시설물 등 생활주변 주요 시설물 안전진단 실시

❍ 매월 안전점검의 날 행사 추진

- 안전의식 고취를 위한 민ㆍ관 합동 캠페인 전개 및 안전수칙 홍보

- 지역별 안전보안관을 중심으로 지역사회에 안전문화운동 실시

❍ 안전신문고 앱 설치 및 안전신고 방법 홍보: 수시

- 생활주변 위험요소 사전 제거로 안전한 사회 만들기 문화 정착

- 코로나19 신고, 5대 불법주정차 신고기능을 통한 안전한 산청 구현

생활 접점형 군민 안전교육을 통한 실 재난발생시 대처능력 향상

❍ 생애주기별 맞춤 안전교육 실시

- 5개분야, 11개 영역, 20개 세부영역으로 구성된 맞춤형 안전교육으로 군민 안전의식 향상

❍ 다중이용시설(대중교통, 체육시설, 숙박시설, 학원 등), 사회복지시설(장애인·노인·아동복지시설)의 운영종사자 및 시설관리자에 대한

안전교육 지원

4. 재해예방 및 관광자원 활용 하천관리

역점

시책

경호강 백리길 친수공간 조성사업

❍ 하천구역내□외 부지매입을 통한 친수공간 조성

❍ 단성면 소남리~금서면 화계리 구간

❍ 2026년까지 연차별 사업 시행 예정

지방하천 유지관리(운영)사업

❍ 2022년 상ㆍ하반기 풀베기사업 시행

- 산청군(11개 읍ㆍ면) 지방하천 대상

❍ 노후배수문 유지관리: 3개면(5개소 대상)

❍ 지방하천 하도준설사업 및 표지판 준비사업

❍ 하천시설물(전기시설물, 데크, 구조물)관리 사업

❍ 하천퇴적물 제거 및 유수지장목 제거사업

효율적 하천관리 및 관광자원 활용의 명품하천 조성

❍ 경호강 백리길(자전거도로) 조성사업 외 지방하천 14개소: 4,390백만원

❍ 소하천유지관리사업(전환) 외 소하천 12개소: 3,604백만원

❍ 하천 친수공간 조성(경호강, 덕천강): 1,800백만원

국가하천 정비 및 남강댐 주변지역 지원사업 시행

❍ 국가하천(남강) 생초면~단성면 구간 L=41.5㎞정비: 210백만원

- 하천풀베기, 하상 유수지장목제거 및 정밀안전점검 등

❍ 남강댐 주변지역 지원사업 시행: 205백만원

- 신안면 및 단성면 영농조건 불리지역 농로포장 등 사업 시행

5. 자연재난 취약시설의 근원적 예방대책 추진

역점

시책

생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

❍ 위    치: 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 비: 42,000백만원(국 21,000, 도 6,300, 군 14,700)

❍ 사 업 량: 지방하천 축제, 파라펫, 교량, 보 낙차공 개선, 우수관로

배수펌프장 설치 2개소, 도로숭상, 예경보시스템 설치 등

자연재해위험개선지구 정비사업

❍ 위    치: 산청군 생비량면 가계리 외 3개소 일원

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 량: 자연재해위험개선지구 정비 4개소

❍ 사 업 비: 41,226백만원(국비 20,613, 도비 6,183.9, 군비 14,429.1)

(단위: 백만원)

지구	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비 고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	4개소	41,226		2,810		3,000		35,416
법평	교량 2개소 등	13,693	실시설계	2,410	교량 2개소 등	1,500	교량 2개소 등	9,783
입덕문	하도개선 1식 등	9,733	실시설계 토지보상	400	하도개선 1식 등	1,000	하도개선 1식 등	8,333
단계	교량 1개소 등	8,300	-	-	실시설계 토지보상	200	교량 1개소 등	8,100
소이	교량 1개소 등	9,500	-	-	실시설계 토지보상	300	교량 1개소 등	9,200

급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❍ 위    치: 산청군 금서면 신아리 외 4개소 일원

❍ 사업기간: 2020. 6 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 량: 급경사지 붕괴위험지구 정비 5개소

❍ 사 업 비: 19,418백만원(국비 9,709, 도비 2,912.7, 군비 6,796.3)

(단위: 백만원)

지구	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	4개소	19,418		926		2,660		15,832
신아	사면정비200m 등	4,954	실시설계 토지보상	726	사면정비200m 등	1,000	사면정비200m 등	3,228
동당	사면정비 250m 등	5,832	실시설계 토지보상	200	사면정비 250m 등	900	사면정비 250m 등	4,732
대현	사면정비 340m 등	5,632	-	-	실시설계 토지보상	460	사면정비 340m 등	5,172
상법	사면정비 100m 등	3,000	-	-	실시설계 토지보상	300	사면정비 100m 등	2,700

조기경보시스템 구축사업

❍ 위    치: 산청군 단성면 호리 외 2개소 일원

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 량: 조기경보시스템 구축 3개소

❍ 사 업 비: 950백만원(국비 475, 도비 142, 군비 333)

(단위: 백만원)

지구	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계	3개소	950				950	-	-
저호	경보 시스템	350	-	-	경보 시스템	350
하정	경보 시스템	350	-	-	경보 시스템	350	-	-
하정	침수 알림시스템	250	-	-	침수 알림시스템	250

소규모공공시설 종합정비 계획수립 용역

❍ 소규모공공시설 안전점검, 보수ㆍ정비 등 실태조사 및 정비계획 수립 용역에 따른 생활안전 강화 및 안전한 지역사회 구축

❍ 향후 행안부에서 소규모공공시설에 대한 국비 지원이 예상되며 소규모시설 중 위험시설에 대하여는 재난안전특별교부세 지원

- 용 역 명: 산청군 소규모공공시설 종합정비 계획수립 용역

- 위    치: 산청군 전 지역

- 과 업 량: 소규모공공시설 전수조사, 정비계획 수립 등

- 사 업 비: 1,500백만원

지구	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
계		1,500				500		1,000
관내	소규모 공공시설	1,500	-	-	조사용역	500	조사 및 보고서	1,000

- 조사대상 : 등록된 6개 시설 796개소, 미등록 소규모공공시설

※ 소규모공공시설 및 위험시설 재정비로 등록시설 796개소에서

3,000여 개소로 증가 예상

❍ 추진계획

- 용역 계약심사 및 사업수행능력평가                 : '22. 1 ~ 3월

- 용역 착공                                         : '22. 4월

- 1차분 용역 준공                                   : '22. 12월

- 전체 용역 준공                                    : '23. 12월

6. 교통편익 증진 및 생활환경 개선 도로정비

역점

시책

군도 확·포장사업 추진

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 량: 4개소 L=4.48km

❍ 사 업 비: 3,003백만원(군비)

❍ 사업내용: 군도24호 소둔철~갈전간도로 확포장공사 외 3건

농어촌도로 확·포장사업 추진

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 량: 14개소 L=10.26km

❍ 사 업 비: 9,110백만원(군비 8,110, 도 1,000)

❍ 사업내용: 안봉진입도로확포장공사 외 13건

교량보수 및 기타도로사업

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 량

- 도로주민숙원사업: 3개소 2,985백만원

- 교량점검 및 보수: 3건(168개소) 500백만원

- 도로유지 및 보수: 6건 1,150백만원

❍ 사 업 비: 4,635백만원(군비)

❍ 사업내용: 주민편의를 위한 숙원사업, 교량점검 및 관내도로 유지  관리사업

7. 안전 영농 실현을 위한 농업기반시설 정비

역점

시책

농업기반 주민숙원사업

❍ 위    치: 산청군 산청읍 외 10개면

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 12월

❍ 사업량/사업비: 읍면 주민숙원사업 108건 / 5,058백만원

❍ 기대효과: 영농 기반 조성으로 오랜 주민숙원 해소

❍ 기    타: 주민숙원사업은 군 전체 예산 범위 내 시행계획

시군수리시설 개보수사업

❍ 위    치: 신안면 문대리, 생초면 평촌리

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 량: 배수장증설 1개소, 저수지 개보수 1개소

❍ 사 업 비: 2,010백만원(전환 1,608, 도비 121, 군비 281)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
문대 배수장	배수장증설 1개소	1,760	실시설계 증설1개소	1,350	증설 1개소	410			전환 80% 도비 6% 군비 14%
차돌뱅이 저수지	저수지 개보수 1개소	250			개보수 1개소	250

소규모 배수개선사업

❍ 위    치: 생초면 신연리, 단성면 묵곡리, 신안면 장죽리 일원

❍ 사업기간: 2019. 1 ~ 2023. 12월

❍ 사 업 량: 배수장 3개소 신설

❍ 사 업 비: 9,379백만원(전환 7,503, 도비 562, 군비 1,314)

(단위: 백만원)

구분	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
신연지구	배수장 1개소	4,526	실시설계 배수장1개소	2,522	배수장 1개소	1,000	배수로 1.5km	1,004	전환 80% 도비 6% 군비 14%
묵곡지구	배수장 1개소	3,000	실시설계 배수장1개소	1,550	배수장 1개소	1,450
용흥지구	배수장 1개소	1,853	실시설계 배수장1개소	1,200	배수장 1개소	653

신촌지구 소규모 농촌용수개발사업(계속)

❍ 위    치: 산청군 차황면 법평리 일원

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 량: 저수지 1개소, 용수로 L=2.0km

❍ 사 업 비: 9,000백만원(전환 6,300, 군비 2,700)

(단위: 백만원)

구분	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
신촌 지구	저수지 1개소	9,000	기본계획 실시설계	5,259	보상1식 저수지 1개소	1,000	저수지 1개소	2,741	전환 70% 군비 30%

실매지구 지표수 보강개발사업(계속)

❍ 위    치: 산청군 차황면 실매리 일원

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 량: 저수지 1개소, 용수로 L=1.0km

❍ 사 업 비: 5,000백만원(전환 3,500, 군비 1,500)

(단위 : 백만원)

구분	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
실매지구	저수지 1개소	5,000	기본계획 실시설계	1,000	보상1식 저수지 1개소	1,000	저수지 1개소	3,000	전환 70% 군비 30%

기계화경작로 확포장사업

❍ 위    치: 산청군 관내 일원

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 12월

❍ 사 업 량: 기계화경작로 3.2km

❍ 사 업 비: 500백만원(전환 350, 군비 150)

재해위험저수지 정비사업

❍ 위    치: 산청군 오부면 왕촌리 외 3개소 일원

❍ 사업기간: 2019. 2 ~ 2023. 12월

❍ 사 업 량: 재해위험저수지 정비 4개소

❍ 사 업 비: 4,600백만원(국비 2,300, 도비 690, 군비 1,610)

(단위 : 백만원)

저수지명	합계		2021년까지		2022년		2023년이후		비고
	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
왕촌	저수지 1개소	1,900	실시설계 여방수로	964	그라우팅	936			국비 50% 도비 15% 군비 35%
아미랑	저수지 1개소	900	설계1식 보상 1식	348	제당	200	여방수로, 복통	352
대현갈	저수지 1개소	1,100	설계1식 제당	348	여방수로, 복통	752
점골	저수지 1개소	700	설계1식	40	제당	200	여방수로, 복통	460

Ⅴ. 주요 현안사업

군도 및 농어촌도로 확포장공사

산청(머뭄) 스마트 복합쉼터 조성사업

생초국제조각공원 연계시설 확충사업

교량보수 및 기타 도로사업

하천 유지관리사업

지방하천 시설정비사업

경호강 백리길(자전거도로) 조성사업

남강댐 주변지역 지원사업

소하천 유지관리사업

신연지구 소규모 배수개선사업

신촌, 실매 저수지 신설

생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

자연재해위험개선지구 정비사업

급경사지 붕괴위험지구 정비사업

타기관 추진사업 현황

1. 군도 및 농어촌도로 확포장공사

❖ 관내 군도 및 농어촌도로의 미개량 노선을 확포장하여 교통소통에

원활을 기하고 지역 간 접근성을 향상시켜 주민의 소득증진과 지역

균형 발전에 기여코자 함

추진방향

❍ 군도 및 농어촌도로 정비계획에 의거 연차적으로 예산 확보 후 추진

❍ 계속사업은 집중투자로 조기 마무리토록 하고 신규사업은 주민

수혜도 등을 고려하여 시급한 노선부터 우선 추진

❍ 차량통행에 따른 안전사고의 위험이 큰 지구부터 우선 추진

사업개요

❍ 사업명: 소둔철~갈전간도로 확포장공사외 17개소

❍ 사업비: 12,113백만원

추진계획

❍ 신규사업 조사측량 및 실시설계 용역            : '22. 1 ~  2월

❍ 신규 및 계속사업 착수 및 준공                 : '22. 3 ~ 12월

기대효과

❍ 지역 간 교통망 확충으로 관광객 유치 극대화 및 지역개발 활성화

❍ 농어촌도로 개량으로 주민불편 해소 및 낙후된 지역경제 활성화 기여

사업내역

❍ 군도정비사업

사업명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총사업비	'21까지	'22년	'23이후
계(4건)	L=4.48km	8,228	5,225	3,003	0
소둔철~갈전간도로 확포장공사	L=2.65km	5,000	4,295	705		계속
군도24호 신안마을 우회도로 개설공사	L=0.66km	1,250	430	820		계속
군도25호 (고치지구) 접속도로정비공사	L=0.40km	78		78		계속
군도30호 운동장~사평 도로 개설공사	L=0.77km	1,900	500	1,400		계속

❍ 농어촌도로 확포장공사

사 업 명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총사업비	'21까지	'22년	'23이후
계(14건)	L=17.46km	26,426	5,416	9,110	11,900
내고~갈전간도로 확포장공사	L=1.22km	2,540	340	300	1,900	계속
안봉진입도로 확포장공사	L=0.56km	1,000	200	800		계속
원리~동신간도로 확포장공사	L=0.87km	2,800	1,100	500	1,200	계속
특리마을 우회도로 개설공사	L=0.89km	1,670	420	1,250		계속
신안곡소 버스진출입도로 정비공사	L=0.69km	895	45	300	550	계속
시천남대 버스진출입도로 정비공사	L=0.75km	2,150	50	1,000	1,100	계속
유점두릅재 진입도로 확포장공사	L=0.56km	2,255	55	500	1,700	계속
구평~원계남 굴곡도로 개선공사	L=0.41km	500		500		계속
만암도로 확포장공사	L=0.4km	520	70	450		계속
오부소룡산 진입도로 확포장공사	L=0.34km	672	22	200	450	계속
소둔철~대둔철 연결도로 확포장공사	L=2.0km	4,000		500	3,500	계속
오부중매~압수간도로 확포장공사	L=0.84km	946	46	900		계속
산청내정지구 도로확포장공사	L=0.43km	478	28	450		계속
중산~내대간도로 확포장공사	L=3.0km	6,000	3,040	1,460	1,500	계속

2. 산청(머뭄) 스마트 복합쉼터 조성사업

❖ 산청(머뭄) 스마트복합쉼터를 조성하여 지역의 특산물 판매와

일자리 창출에 따른 주민의 소득 증대와 관광자원과 연계한

홍보 등으로 산청군 이미지 제고

추진방향

❍ 스마트복합쉼터를 거점으로 주변 관광지 자원과의 연계한 홍보

❍ 산청군을 대표하는 문화관광 축제와 연계한 시너지 효과

사업개요

❍ 위    치: 산청군 생초면 신연리 산92-7번지 일원

❍ 사 업 량: 스마트 복합 쉼터 조성 A=15,865㎡

❍ 사 업 비: 35억원 (국비 20, 군비 15)

❍ 사업내용: 홍보관, 휴게시설 등

추진사항 및 계획

❍ 스마트복합쉼터조성사업 공모사업선정           : '21. 3. 2.

❍ 업무협약(MOU)체결: 진주국토관리사무소-산청군  : '21. 4. 15.

❍ 토목.건축 실시설계 도로구역결정변경 용역       : '21. 6 ~ 12월

❍ 사업 착수 및 준공                             : '22. 1 ~ 12월

기대효과

❍ 특산물 판매장 운영등 지역자원과 연계하여 일자리 창출 및 주민소득증가로 지역경제 활성화 기여

❍ 지역의 새로운 거점 역할로서 관광객 수요증가와 시설 이용자 증가에 따른 역동적인 국도의 이미지 구축

3. 생초국제조각공원연계시설확충사업

❖ 대전~통영간 고속도로 생초IC와 지방도 1034호선을 연결하는 고읍교는 대형 화물차량 등의 진입이 불가하고 노후로 인해 교량안전에 대한 문제가 대두되어 재가설을 추진함

사업개요

❍ 위    치: 산청군 생초면 하촌리~어서리 고읍교

❍ 사 업 량: 교량 L=184m, B=12m, 도로 L=425m, B=10m

❍ 사 업 비: 8,000백만원(국비 7,520, 지방비 480)

그간 추진사항

❍ 실시설계 용역 완료                                 : '19. 4월

❍ 공사착공(1차분)                                     : '20. 3월

❍ 소규모환경영향평가 협의 완료                       : '20. 8월

❍ 지역개발사업구역의 지정 및 사업시행자지정 실시계획 승인  : '21. 3월

❍ 공사착공(2차분)                                     : '21. 4월

추진계획

❍ 1차분 준공                                         : '21. 9월

❍ 잔여분 발주                                        : '21. 1월

❍ 2차분 준공                                         : '22. 6월

❍ 공사(2차.3차)준공                                   : '22. 12월

기대효과

❍ 교량 재가설 및 연결도로 정비로 대형차량의 진출입 용이 및

인근 주민생활 환경 개선에 기여

4. 교량보수 및 기타도로사업

❖ 관내 교량에 대한 정밀점검 및 안전점검결과에 따라 유지보수를

시행하여 안전사고를 사전에 예방하고 군도 및 농어촌도로 시설물

등을 정비하여 도로유지 관리에 만전을 기하고자 함

추진방향

❍ 교량 정밀점검 및 안전점검 결과에 따라 교량 보수ㆍ보강 추진

❍ 군도 및 농어촌도로 상 사고위험 요소가 있는 지구부터 우선 추진

사업개요

❍ 사업명: 구아마을 진입도로 확포장공사외 11건

❍ 사업량

- 주민숙원사업 2건 / 2,518백만원

- 도로유지관리사업 7건 / 1,020백만원

- 교량관리사업 3건 / 420백만원

추진계획

❍ 조사측량 및 실시설계 용역                     : '22. 1 ~ 2월

❍ 사업 착수 및 준공                             : '22. 3 ~ 12월

기대효과

❍ 도로시설물 유지관리로 안전사고 예방 및 주민불편사항 해소

❍ 주민숙원사업 시행으로 편의 증진 및 지역경제 활성화 기여

사업세부내역

구분	사 업 명	사업량	사업비 (백만원)	비 고
계	12건		3,958
교량관리사업	교량정밀점검	6개소	60
	교량안전점검	156개소	60
	교량유지보수	6개소	300	점검결과에 따라 보수
도로유지 관리사업	군도,농촌도 차선도색사업	L=90km	200
	군도,농촌도 소파보수사업	10개노선	200
	상반기 도로변 풀베기사업	L=200km	150
	도로재해위험지 보수	10개소	100
	도로시설 긴급장비대	1식	50
	도로관리용 CCTV보수	1식	20	어린이보호구역단속카메라
	미불용지 보상금지급	50필지	300	특별조치법 보상금지급 포함
주민숙원사업	구아마을 진입도로 확포장공사	L=0.6km	641
	내리지성마을 도로확포장공사	L=0.8km	1,877

5. 하천 유지관리사업

❖ 관내 국가하천 및 지방하천에 미 정비된 기성제와 하상에 퇴적된 퇴적물제거

□ 노후화된 표지판 정비를 통해 효율적인 시설물 유지관리 시행

추진방향

❍ 하상에 퇴적된 퇴적물 제거 및 유수지장목 제거 실시

❍ 노후화된 표지판 정비 및 기성제방 풀베기 등 시행

사업개요

❍ 위    치: 국가하천 및 지방하천 11개소

❍ 사 업 량: 퇴적물제거 및 유수지장목 제거 등 1식

노후화된 표지판 교체 및 정비작업 1식

❍ 사 업 비: 1,190백만원(국비 210, 도비 190, 군비 790)

추진계획

❍ 홍수기 대비 하천점검시행                      : '22. 1. ~ 10월

❍ 퇴적물 및 지장목 제거대상지 조사              : '22. 1월

❍ 퇴적물 및 유수지장목 정비                     : '22. 1. ~ 11월

❍ 하천시설물 정밀점검용역 및 정비               : '22. 1. ~ 11월

기대효과

❍ 하천퇴적물 및 유수지장목 정비를 통해 인근 농경지 및 재해 방지

❍ 표지판 및 수문 등의 정비를 통한 효율적 하천시설물 관리

6. 지방하천 시설정비사업

❖ 산청군 관내 미 정비된 지방하천에 대하여 본 사업을 통해 시설을 정비하여 자연재해 예방과 효율적인 지방하천 관리에 기여하고자 함

사업개요

❍ 위    치: 산청군 생초면 계남리 외 14개소

❍ 사 업 량: 하천제방 보강 및 시설물 정비 1식

❍ 사 업 비: 2,890백만원(군비)

추진계획

❍ 실시설계용역 시행                                : '22. 1월

❍ 사업추진 및 착수                                 : '22. 3월

❍ 사업 준공                                        : '22. 10월

기대효과

❍ 하천정비를 통한 시설물의 효율적 관리

❍ 자연재해 예방 및 사유재산 보호

사업세부내역

구 분	사업량(km)	사업비(백만원)	비고
계	1식	2,890
계남천(계남지구) 지방하천 정비공사	0.2	100
오봉천(방곡지구) 지방하천 정비공사	0.15	150
삼장 평촌지구 지방하천 정비공사	0.2	200
덕천강(대하지구) 친수공간 조성공사	20,000㎡	800
시천천(선비문화연구원) 저수호안 정비공사	0.53	200
삼장천(대포지구) 데크 설치공사	0.1	80
중태천 지방하천 정비공사	0.16	100
시천천(신천지구) 지방하천 정비공사	0.45	100
입석천(중촌지구) 지방하천 정비공사	0.12	100
갈천천(갈전지구) 지방하천 정비공사	0.3	500
양천 인도교 정비공사	1.2	50
미곡천(화현지구) 둑마루 정비공사	0.1	30
단계천(단계지구) 지방하천 정비공사	0.1	80
상법천(법물지구) 지방하천 정비공사	0.1	60
경호강 백리길(친수공간) 조성사업 기본계획수립용역	1식	50
지방하천 미불용지 보상금지급	1식	290

7. 경호강 백리길(자전거도로) 조성사업

❖ 경호강을 매개체로 산청군과 진주시를 자전거도로를 연결하여    관광, 상호교류 등 상생발전의 발판을 마련하는데 목적이 있음

사업개요

❍ 위  치: 산청군 단성면 관정리 ~ 금서면 주상리 일원

총연장	개설완료	미개설	기존도로정비	비 고
45.0	20.44	7.86	16.7

❍ 내  용: 자전거도로 개설 L=45.0㎞

❍ 사 업 비: 140억원(기투자: 109억, 투자 중: 16억, 장래분: 15억)

❍ 사업기간: 2018. 3 ~ 2022. 12월

그간 추진사항

❍ 수산~어천간 자전거 도로 개설 완료            : '19. 10월

❍ 단성 소남  ~ 산청읍 범학구간 L=5.0㎞ 시공 완료    : '21. 3 ~ 12월

추진계획

❍ 단성 사월지구 계약심사 발주                    : '22. 2월

❍ 단성 사월지구 공사 준공                        : '22. 12월

기대효과

❍ 자전거 도로를 통한 외부 탐방객 유치로 지역경제 활성화 기대

❍ 깨끗하고 아름다운 관광산청 이미지 제고

8. 남강댐 주변지역 지원사업

❖ 우리 군 수변구역인 단성면 및 신안면에 지역주민의 건의사항에

대하여 본 사업을 시행하여 장기적인 편익을 제공하고자함

사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 및 신안면

❍ 사 업 량 : 지역개발사업 1식

❍ 사 업 비 : 205백만원(국비)

❍ 사업내용 : 콘크리트포장, 마을회관 정비 및 물품 구입

추진계획

❍ 남강지사로부터 사업승인                           : '22. 1월

❍ 단성면 및 신안면 사업비 재교부                    : '22. 2월

❍ 사업 준공                                         : '22. 6월

기대효과

❍ 수변지역 정비를 통한 친화적인 깨끗한 환경 조성

❍ 지역주민의 오랜 숙원사업 해소

9. 소하천 유지관리사업

❖ 우리 관내 소하천정비기본계획에 따라 미 정비된 소하천에 대하여 본 사업을 통해 정비하여 군민의 재산보호 및 수해피해 예방

사업개요

❍ 위    치: 산청군 단성면 길리 외 14개소

❍ 사 업 량: 소하천정비 L=4.55km

❍ 사 업 비: 3,604백만원(전환 2,124, 군비 1,480)

추진계획

❍ 실시설계용역 시행                                : '22.  1월

❍ 사업추진 및 착수                                 : '22.  3월

❍ 사업 준공                                        : '22. 12월

기대효과

❍ 농경지 수해피해 사전예방과 재산 보호

❍ 소하천정비를 통한 하천의 효율적인 관리

사업세부내역

구 분		사업량(km)	사업비(백만원)	비고
총 계		4.55	3,604
군시행 (전환사업)	길리 소하천 정비공사	0.2	500	신규
	두곡 소하천 정비공사	1.2	1,324	신규
	오고 소하천 정비공사	1.2	300	신규
읍면시행 (자체사업)	내리 마당머리 소하천 정비공사	0.35	350	신규
	운곡 소하천 정비공사	0.25	300	신규
	신기동 소하천 정비공사	0.2	120	신규
	신기골 소하천 정비공사	0.15	120	신규
	금곡 정지골 소하천 정비공사	0.05	50	신규
	월곡 소하천 정비공사	0.15	100	신규
	서원 소하천 정비공사	0.2	100	신규
	가현 소하천 정비공사	0.1	80	신규
	길리1 소하천 정비공사	0.15	80	신규
	어천 소하천 정비공사	0.15	80	신규
	안봉앞 소하천 정비공사	0.1	50	신규
	봉두 소하천 정비공사	0.1	50	신규

10. 신연지구 소규모 배수개선사업

❖ 생초면 신연지구는 배수 본천인 남강 및 생초천 만수위시 내수

배제 불량으로 매년 침수 피해가 발생하는 지구로 배수개선사업을

통한 재해예방

추진방향

❍ 생초면 신연지구 상습 침수위험 해소를 위한 배수개선사업 추진

❍ 주민 불편 최소화를 조기 예산 확보 및 사업 준공

사업개요

❍ 사업기간: 2019. 1 ~ 2023. 12월(5년간)

❍ 위    치: 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사 업 량: 배수장 1개소, 배수로 L=1,456m

❍ 사 업 비: 4,526백만원(전환 3,621, 도비 181, 군비 724)

❍ 사업내용: 배수장 신설 1식(수혜면적 35ha, 유역면적 273ha)

※ 신연구역 Q=2.3㎥/S(∅700mm×2대, ∅500mm×1대)

그간 추진사항

❍ 예정지 조사 및 기본계획                    : '18. 3월

❍ 소규모 배수개선사업 신규지구 반영(농림부)   : '18. 5월

❍ 시행계획 수립 및 실시설계 용역             : '19. 1 ~ '20. 8월

❍ 공사 착공                            : '20. 9월(현 진도율 60%)

추진계획

❍ 신연지구 소규모 배수개선사업 준공          : '23. 12월

기대효과

❍ 상습 침수지역 배수개선을 통해 주민생활 안정 및 안전 영농실현으로 지역경제 활성화 도모

11. 신촌, 실매 저수지 신설

❖ 최근 강수량 감소 및 지표수 부족에 따른 농업용수 부족으로 가뭄

피해가 발생하는 지역에 대하여 저수지를 신설하여 안정적인 농업

용수 확보

추진방향

❍ 농업용수 부족으로 가뭄 피해가 우려되는 지역에 농업용 저수지 신설

❍ 사업 반영 및 조속 추진을 위한 관련부처(농림축산식품부)사업 탄력적 추진

사업개요

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2024. 12월(5년간)

❍ 위    치: 차황면 법평리 차황면 실매리 일원

❍ 사 업 량: 저수지 2개, 용수로 L=3.0km

❍ 사 업 비: 14,000백만원(국비 9,800, 군비 4,200)

❍ 사업내용: 신촌지구(11만톤, 9,000백만원), 실매지구(15만톤, 5,000백만원)

❍ 관련사업: 신촌지구(일반농촌개발사업 소규모농촌용수개발사업추진)

실매지구(일반농촌개발사업 지표수보강개발사업추진)

그간 추진사항

❍ 상습가뭄재해지구 대상지 제출               : '18. 4월

❍ 대상지 현장 확인(행안부)                    : '18. 5월

❍ 기본 조사 용역 완료                        : '18. 10 ~ '19. 3월

❍ 경상남도 농업정책과 방문 사업 건의         : '19. 1월

❍ 일반농촌개발사업 신규지구 신청             : '19. 2월

❍ 기본조사 및 실시설계용역, 시행계획 수립 및 공고 : '20. 1 ~ '22. 6월

추진계획

❍ 공사 착공 및 준공                          : '22. 6 ~ '24. 12월

기대효과

❍ 저수지 신설을 통한 안전 영농기반 구축으로 가뭄 해소 및 농가 소득 증대

12. 생초지구 풍수해 생활권 종합정비사업

❖ 남강 본류 배수위 영향으로 인한 침수피해 발생이 빈번한 주거지 및 농경지에 대하여 조속한 정비사업 추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경을 조성하고자 함

추진방향

❍ 상습 침수피해지역 해소를 위한 종합적인 재해예방사업 추진

❍ 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 준공

사업개요

❍ 위    치: 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 사 업 비: 42,000백만원(국비 21,000, 도비 6,300, 군비 14,700)

❍ 사 업 량: 지방하천 축제, 파라펫, 교량, 보 낙차공 개선, 우수관로

배수펌프장 설치 2개소, 도로숭상, 예경보시스템 설치 등

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 2024. 12.월

그간 추진사항

❍ “생초지구” 공모사업 최종 확정                    : '20. 6월

❍ 실시설계용역 착공                                  : '21. 3월

추진계획

❍ 행정절차 및 인허가 협의, 보상협의 완료 예정        : '22. 6월

❍ 사업 착공 예정                                     : '22. 7월

기대효과

❍ 침수피해지역 풍수해 생활권 종합정비사업 추진으로 주민의 생명과 재산 보호 및 주거환경 개선 도모

13. 자연재해위험개선지구 정비사업

❖ 재해 발생 우려가 높은 자연재해위험개선지구에 조속한 정비사업

추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경 조성

추진방향

❍ 상습 침수 및 유실위험지역 해소를 위한 재해예방사업 추진

❍ 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 준공

사업개요

❍ 대 상 지: 법평 자연재해위험개선지구외 4개소

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 비: 41,476백만원(국비 20,738, 도비 6,221.4, 군비 14,516.6)

사업명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총 사업비	'21년 까지	'22년	'23년 이후
5개지구		41,476	2,810	3,250	35,416
법평 자연재해위험 개선지구 정비사업	교량재가설 2개소 등	13,693	2,410	1,500	9,783	계속
입덕문 자연재해위험 개선지구 정비사업	하도개선 1식 등	9,733	400	1,000	8,333	계속
단계(남단교) 자연재해위험 개선지구 정비사업	교량재가설 1개소 등	8,300	-	200	8,100	신규
신등(소이교) 자연재해위험 개선지구 정비사업	교량재가설 1개소 등	9,500	-	300	9,200	신규
원지강변 둔치주차장 침수위험 신속 알림 시스템 구축사업	알림시스템 구축 1식 등	250	-	250	-	신규

추진계획

❍ 신규사업 실시설계용역 및 사업착공             : '22. 1 ~ 12월

❍ 계속사업 사업 시행 및 착공                    : '22. 1월

기대효과

❍ 침수 및 유실위험지역 재해예방사업 추진으로 주민의 생명과 재산 보호

14. 급경사지 붕괴위험지구 정비사업

❖ 재해 발생 우려가 높은 급경사지 붕괴위험지구에 조속한 정비사업

추진으로 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경 조성

추진방향

❍ 급경사지 붕괴위험지역 해소를 위한 재해예방사업 추진

❍ 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 준공

사업개요

❍ 대 상 지: 신아급경사지 붕괴위험지구외 3개지구

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 비: 19,418백만원(국비 9,709, 도비 2,912.7, 군비 6,796.3)

사업명	사업량	사업비(백만원)				비고
		총 사업비	‘21년 까지	‘22년	‘23년 이후
4개지구		19,418	926	2,660	15,832
신아 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	사면개량 200m 등	4,954	726	1,000	3,228	계속
동당 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	사면개량 250m 등	5,832	200	900	4,732	계속
대현 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	사면개량 340m 등	5,632	-	460	5,172	신규
상법 급경사지 붕괴위험지구 정비사업	사면개량 100m 등	3,000	-	300	2,700	신규

추진계획

❍ 신규사업 실시설계용역 및 사업착공             : '22. 1 ~ 12월

❍ 계속사업 사업 시행 및 착공                    : '22. 1월

기대효과

❍ 급경사지 붕괴 위험지역 정비사업 추진으로 주민의 생명과 재산 보호

15. 타기관 추진사업 현황

삼장~산청 국도건설공사(밤머리재터널) 추진현황

❍ 위    치: 산청군 삼장면 홍계리~금서면 평촌리(국도59호선)

❍ 사 업 량: L=6.0km(터널1개소 L=3.0km, 접속도로 L=3.0km)

❍ 사 업 비: 105,200백만원(공사비 94,200백만원, 보상비 등 11,000백만원)

'19년까지: 513억, '20년: 139억, '21년이후: 400억

❍ 사업기간: 2016. 4 ~ 2023. 3월

❍ 추진사항

- 실시설계 용역 시행 및 완료                : '11. 12 ~ '13. 8월

- 보상협의 추진                             : '16. 11월

- 공사 착수                                 : '17. 2월

- 터널 굴착작업 착수                        : '18. 7월

- 터널굴착 완료(L=3.0km)                    : '19. 8월

- 터널 및 도로포장공사 추진 중(공정율 70%)  : '21. 9월

- 준공예정                                  : '22. 6월

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청

국도20호선『단성~시천간2』국도건설공사

❍ 위    치: 산청군 단성면 사월리 ~ 길리

❍ 사 업 량: 도로확포장 L=3.0km, B=19.5m

❍ 사 업 비: 41,400백만원

❍ 사업기간: 2019. 11 ~ 2024. 11월

❍ 추진사항

- 제4차 국도건설5개년계획 반영                   : '16.  7월

- 실시설계용역 완료                              : '18.  9월

- 행정절차이행                                   : '19. 12월

- 보상협의 및 공사추진                           : '20 ~ '23년

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청

국도20호선『신안~생비량간』국도건설공사

❍ 위    치: 산청군 단성면 강누리 ~ 생비량면 도리

❍ 사 업 량: 도로확포장 L=9.2km, B=19.5m

❍ 사 업 비: 179,300백만원

❍ 사업기간: 2020. 8 ~ 2027. 8월

❍ 추진사항

- 실시설계용역 완료                              : '14.  7월

- 예비타당성 면제 확정                           : '19.  2월

- 사업적격성 심사 및 행정절차 이행               : '19. 12월

- 보상협의 및 공사추진                           : '20 ~ '27년

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청

국지도60호선 선형개량공사

❍ 위    치: 산청군 금서면 매촌리 ~ 금서면 화계리

❍ 사 업 량: L=8.88km, B=12.0m(기추진 5.68km, 향후계획 L=3.2km)

❍ 사 업 비: 33,400백만원(기투자 15,100백만원, 향후 18,300백만원)

※ 용역비 : 945백만원

❍ 사업기간: 2020. 10 ~ 2023. 12월

❍ 추진사항

- 금서면 매촌리~동의보감촌 구간 L=5.68km 시공완료 : '10. 2 ~ '13. 8월

- 잔여구간(L=3.2km) 제4차 국지도건설 5개년계획 반영요청 : '13.  9.  6.

- 도지사 순방시 사업건의                      : '15.  1월

- 국토부 제4차 국지도5개년 반영               : '16.  9월

- 조사측량 및 실시설계 착수                   : '17.  5월

- 실시설계용역 완료                           : '19. 12월

- 감정평가 실시                               : '20.  8월

- 보상협의 추진                               : '20. 12월 ~

- 시공업체 선정 및 공사추진                   : '21.  3월

❍ 시 행 청 : 부산지방국토관리청 설계, 경상남도 시행

국도59호(창주~구생기간) 우회도로 개설공사

❍ 위    치: 산청군 금서면 특리 ~ 산청읍 지리

❍ 사 업 량: 우회도로개설 L=0.9km(도로 L=0.6km, 교량 L=0.3km)

❍ 사 업 비: 156억원(19년 : 6억, 20년이후 : 150억)

❍ 사업기간: 2019 ~ 2024년

❍ 추진사항:

- 제6차 국도병목지점 개량사업 반영              : '18.  1월

- 실시설계용역비 3억 확보                       : '18. 12월

- 실시설계용역 완료                             : '21. 12월

- 공사발주                                      : '22.  1월

- 행정절차 이행 및 보상협의 추진, 사업착수      : '22. 2 ~ 12월

- 공사완료                                      : '24. 12월

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청

원지교차로 개선공사

❍ 위    치: 산청군 신안면 하정리

❍ 사업내용: 교량확장 L=120m, 도로 L=150m

❍ 사 업 비: 30억원(19년: 0.5억, 20년이후: 29.5억)

❍ 사업기간: 2019. 12 ~ 2022. 12월

❍ 추진사항:

- 제6차 국도병목지점 개량사업 반영             : '17. 10월

- 실시설계용역비 착수                          : '19.  4월

- 공사발주                                     : '19. 11월

- 공사완료                                     : '21.  9월

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청 진주지소

국도3호선 산성교차로 개선공사

❍ 위    치: 산청군 신안면 중촌리

❍ 사업내용: 교차로개선 L=300m

❍ 사 업 비: 20억원

❍ 사업기간: 2021. 2 ~ 2023. 2월

❍ 추진사항:

- 제6차 국도병목지점 개량사업 반영                : '17. 10월

- 보상협의 및 공사착공                            : '21. 2월

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청 진주지소

국지도60호(척지도로) 굴곡도로 개량사업

❍ 위    치: 산청군 산청읍 정곡리 ~ 신등면 모례리

❍ 사업내용: 굴곡도로 시설개량사업 L=8.7km

❍ 사 업 비: 455억원

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026년

❍ 추진사항:

- 제5차 국도□국지도 건설계획 반영, 사업확정        : '21. 9. 29.

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청, 경상남도

금서지구 하천재해예방사업

❍ 사업구분: 금서천(지방하천)

❍ 위    치: 산청군 금서면 매촌리 ~ 향양리

❍ 사업기간: 2020. 6. 20. ~ 2023. 6. 19.

❍ 사 업 량: 하천정비 L=3.3km

(교량재가설  6개소, 축제 및 보축 12개 지구)

❍ 사 업 비: 155억원(설계비 5억, 도급 96억, 관급 44억, 보상비 10억)

❍ 투자계획                                           (단위: 억원)

합 계		기투자		2022 시행		장래분		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=3.90㎞	155.0	실시설계 보상협의	92.0	보상협의하천정비 L=1.0㎞	30.0	하천정비 L=1.7㎞	63.0

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청

남강(방목지구)하천환경 정비사업

❍ 사업구분: 남강(국가하천)

❍ 위    치: 산청군 산청읍 범학리 ~ 신안면 하정리

❍ 사업기간: 2019. 3 ~ 2023. 6월

❍ 사 업 량: 하천정비 L=2.37km

(하천환경정비 7개소 125,620㎡, 하천정비 2개소 7,210㎡)

❍ 사 업 비: 250억원(공사비 162억, 보상비 88억)

❍ 투자계획                                          (단위: 억원)

합 계		기투자		2022년 시행		장래분		비고
사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비	사업량	사업비
L=2.37㎞	250.0	사업착공 보상비1식 L=1.3㎞	100	하천정비 L=1.0㎞	50	초지조성 L=1.07㎡	100

❍ 시 행 청: 부산지방국토관리청

특리지구 다목적용수개발사업

❍ 사업기간: 2022. 1.~ 2026. 12.(5년간)

❍ 위    치: 산청군 금서면 특리 외 3개리 일원

❍ 사 업 량: 저수지 1개소(유효저수량 47만㎥, 생활용수 3,500㎥/day),

양수장 2개소 수혜면적 218ha(신규 119ha, 보강 99ha)

❍ 사 업 비: 36,241백만원(국비)

❍ 추진사항

- 경남도, 중앙부처, 국회 수차례 방문 사업 건의      : '17 ~ '19년

- 2021년 기본조사 대상지구 선정                    : '20. 6월

- 2021년 기본조사 용역시행(한국농어촌공사 경남본부) : '20. 9월

- 기본조사 승인 완료(농림축산식품부)                : '21. 9월

❍ 추진계획

- 2022년 시행지구 신청                             : '22. 1월

- 2022년 시행지구 선정 및 실시설계                 : '22. 4월

- 사업 시행                                 : '23. 6 ~ '26. 12월

❍ 시 행 청: 한국농어촌공사

오성 및 방곡지구 다목적 용수개발사업

❍ 사업기간: 2015. 9 ~ 2023. 12월

구분	위치	수혜면적	총사업비 (2021년도)	사업량	비고
오성지구	오부면 방곡리	77.5ha	19,928백만원 (3,165백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 1개소 용수로 7조 L=7.1km
방곡지구	금서면 방곡리	345ha	45,027백만원 (6,500백만원)	저수지 신설 1개소 양수장 2개소 용수로 5조 L=9.9km

❍ 추진사항

- 방곡지구 시행계획 승인              : '15. 6월

- 방곡지구 공사 착공                  : '15. 9월(현 진도율 85%)

- 오성지구 시행계획 승인              : '18. 6월

- 오성지구 공사 착공                  : '17. 9월(현 진도율 80%)

❍ 추진계획

- 방곡지구 공사 준공                  : '22. 12월

- 오성지구 공사 준공                  : '23. 12월

❍ 시 행 청: 한국농어촌공사

Ⅵ. 신규(특수) 시책

화목보일러 단독경보형감지기 설치사업

조기경보시스템 구축사업(저호, 하정)

1. 화목보일러 단독경보형감지기 설치사업

❖ 화재위험 및 발생빈도가 높은 화목보일러 사용주택에 주택과

보일러실을 연계하는 단독경보형감지기를 설치하여 인명·재난

피해를 사전에 예방하고자 함

추진방향

❍ 산림과 인접한 화목보일러 사용주택 화재 시 산불화재로의 확산사전 차단

❍ 단독경보형감지기 등 설치로 화목보일러 화재 시 신속대피 및 초기진화

사업개요

❍ 사업위치: 산청군 관내 화목보일러 구비 주택

❍ 사업기간: 2022. 1 ~  2022. 3월

❍ 사 업 비: 21백만원

❍ 사업내용

- 화목보일러 설치현황

(2021. 8. 31. 기준)

계	산청읍	차황면	오부면	생초면	금서면	삼장면	시천면	단성면	신안면	생비량면	신등면
700	98	75	28	43	102	75	42	53	23	85	76

- 사 업 량: 단독경보형감지기 700개

추진계획

❍ 사업대상지 선정                                : '22. 1 ~ 2월

❍ 사업추진 및 완료                               : '22. 2 ~ 3월

기대효과

❍ 화재초기 신속대응으로 산불로의 화재 확대 차단

❍ 화재발생 초기 예방에 따른 인명·재난 피해 사전 예방

2. 조기경보시스템 구축사업(저호, 하정)

❖ 재해 우려가 높은 지구에 대한 재해 발생 전 조기 경보 시스템을 구축하여 군민의 생명을 보호하고 안전한 주거환경 조성

추진방향

❍ 재해 위험지역 재해예방을 위한 경보시스템 구축사업 추진

❍ 주민 불편 최소화를 위한 조기 예산 확보 및 사업 준공

사업개요

❍ 위    치: 산청군 단성면 호리 일원, 신안면 하정리 일원

❍ 사 업 비: 700백만원(국비 350, 도비 105, 군비 245)

❍ 사업내용: 조기경보시스템 구축 2식 등

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2022. 12월

그간 추진사항

❍ 2022년 신규사업 신청                              : '21. 3월

추진계획

❍ 실시설계용역 착공 예정                            : '22. 1월

❍ 사업 착공 예정                                    : '22. 3월

❍ 사업 준공 예정                                    : '22. 12월

기대효과

❍ 조기경보시스템 구축으로 주민의 생명과 재산 보호