지 역 발 전 과

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	12

Ⅳ. 2022년도 주요업무계획	14

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업	21

Ⅵ. 신규(특수) 시책	36

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위: 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
19		1	9	4	2	3

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
도시계획담당 (4명)	◦ 군관리계획(재정비) 결정(변경)에 관한 업무 ◦ 지구단위계획구역 및 지구단위계획의 결정(변경)에 관한 업무 ◦ 군계획시설 결정(변경)에 관한 업무 ◦ 군계획시설사업 실시계획 인가 및 공사완료공고
도시재생담당 (4명)	◦ 도시지역 군계획시설 사업시행 및 유지관리에 관한 업무 ◦ 취락지구 개발계획 수립 및 사업시행에 관한 업무 ◦ 도시자연공원사업 시행 및 관리에 관한 업무 ◦ 도로점용 및 자전거이용시설에 관한 업무 ◦ 도시개발사업 지구지정 및 사업시행에 관한 업무 ◦ 도시재생 뉴딜사업에 관한 업무
주택담당 (3명)	◦ 주택건설종합계획수립, 공공임대주택 건립 ◦ 주택건설 및 대지조성 사업계획 승인 ◦ 농촌주거환경개선사업, 전원주택단지 기반시설 지원사업 ◦ 옥외광고물 및 경관․도시디자인 관련 업무 ◦ 농어촌 장애인주택 개조사업, 임대사업자 등록 및 관리
농촌개발담당 (5명)	◦ 농촌협약 및 일반농산어촌개발사업 추진 ◦ 도시개발 및 택지개발사업 추진 ◦ 마을만들기사업 추진 ◦ 시군역량강화사업 추진 ◦ 일반농산어촌개발 사업장 관리 운영
미래전략담당 (3명)	◦ 지역행복생활권 및 지역균형발전사업 추진 ◦ 백두대간권 발전종합계획 추진 ◦ 미래전략산업 공모(지역균형발전사업) 추진 ◦ 산업(농공)단지 조성 및 기업 투자유치에 관한 사항 ◦ 투자유치 보조금 및 융자금 지원ㆍ관리에 관한 사항 ◦ 새마을금고 역사관 건립 및 관련 업무 ◦ 농어촌 취약지역 생활여건 개조(새뜰)사업 추진 ◦ 한방항노화 산업단지 조성 및 분양

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

체계적이고 종합적인 군관리계획 수립

❍ 2025년 산청군관리계획 재정비 수립

- 군관리계획(시설) 결정 및 지형도면 고시

◦교통시설(도로) 41개소, 수도공급설비 3개소

◦지구단위계획(차황시장,입석,단계지구) 내 군관리계획시설 결정(변경)

∙ 도로 2개소 폐지 및 1개소 변경, 학교시설 2개소 폐지, 공원 2개소 폐지,

공원 1개소 신설

- 군관리계획(용도지역․지구,시설) 검토 및 정비

◦용도지역 372개소, 용도지구 29개소, 군계획시설(도로1,공원1,장사시설1)

❍ 군관리계획 결정(변경) 추진

- 군관리계획(지구단위계획) 1개소, 군계획시설(도로 등) 5건 및 공원조성계획 결정(변경) 2개소 등

도시계획도로개설 및 도시활력화사업 추진

❍ 위    치: 산청군 도시지역 일원

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 12월

❍ 사 업 비: 금6,338백만원(도비 850, 군비 5,488)

❍ 사업내용: 도시계획도로 개설 및 확포장, 주차장조성 등

❍ 주요성과

사 업 명	위치	사업내용	사업기간	사업비(백만원)	비고
시천 도시계획도로 (소로2-31,중로2-5호선) 개설공사	시천면 사리	도로개설 L=144m	2020.6 ~ 2021.1월	238	완료
신등 도시계획도로 (소로3-19호선) 개설공사	신등면 단계리	도로개설 L=122m	2020.10 ~ 2021.6월	98	완료
단성면 소재지 가변주차장 조성사업	단성면 성내리	주차장조성 L=289m(58면)	2020.6 ~ 2021.4월	257	완료
단성IC 앞 교차로 정비사업	단성면 사월리	회전교차로 설치 1식 도로정비 L=260m	2021.5 ~ 2021.8월	317	완료
원지 뚝방길 가로등 설치공사	신안면 하정리	가로등설치 10개소	2021.1 ~ 2021.3월	47	완료
산청 도시계획도로 (소로2-16호선) 정비공사	산청읍 지리	도로확포장 L=319m	2021.2 ~ 2021.10월	243	추진중
시천 도시계획도로 (소로2-28호선) 정비공사	시천면 원리	도로확포장 L=135m	2021.9 ~ 2022.6월	164	추진중
단성IC입구 회전교차로 설치사업	단성면 성내리	회전교차로 설치 1식 마실장터 부지조성 1식	2021.9 ~ 2022.12월	435	추진중
지리마을 주차장 및 소공원 조성사업	산청읍 지리	지장물(건물) 보상 10건	2021.9 ~ 2022.12월	800	추진중
신안면사무소 주변 공용주차장 조성사업	신안면 하정리	토지보상 A=213㎡	2021.9 ~ 2022.10월	500	추진중

도시계획시설 유지보수사업 추진

❍ 위    치: 산청군 도시지역 일원

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 12월

❍ 사 업 비: 금625백만원(군비)

❍ 사업내용: 노후도로 재포장, 배수로정비, 도로변 풀베기, 공원시설물 정비 등

❍ 추진성과

- 신안 도시계획도로(2-72호선) 재포장공사

- 산청도시계획도로(소로1-6호선) 정비공사

- 산청공원 산책로 보수공사

- 한마음공원 외 2개소 풀베기사업 등 추진

도시재생 뉴딜사업 추진

❍ 산청읍 도시재생 뉴딜사업(우리동네살리기)

- 위    치: 산청군 산청읍 산청리 150번지 일원

- 사업기간: 2019. 1 ~ 2022. 6월(3년 6개월)

- 사 업 비: 금18,098백만원(국비 4,000, 도비 800, 군비 4,798, 공기업 8,500)

- 사업내용: 약선문화플랫폼 및 마르쉐 조성 외 8개 단위사업

- 추진성과

◦ 약선생활문화플랫폼 및 나무아래마르쉐 공유거점 조성사업 추진

◦ 허브커뮤니티 가로정비사업 추진

◦ 집수리사업 81가구 완료, 주민공모사업 3건 완료 등

❍ 옥산지구 도시재생 스타트업사업

- 위    치: 산청군 산청읍 옥산리 160-1번지 일원

- 사업기간: 2021. 2 ~ 12월

- 사 업 비: 금400백만원(도비 200, 군비 200)

- 사업내용: 거점공간조성 외 7개 세부사업

- 추진성과

◦ 옥산지구 도시재생 현장지원센터 조성사업 추진

◦ 거점공간 조성사업 추진, 가로경관(아케이드) 정비사업 추진

◦ 주민공모사업(6건) 추진, 도시재생대학 운영 등

❍ 산청군 도시재생 전략계획 수립

- 용 역 명: 산청군 도시재생 전략계획 수립용역

- 용역기간: 2020. 9 ~ 2021. 6월

- 용 역 비: 금135백만원

- 수립지역: 옥산지구 외 7개 지구

동의보감 시오리길 조성사업 추진

❍ 위    치: 산청군 금서면 매촌리~특리 일원

❍ 사업기간: 2021 ~ 2023년(3년)

❍ 사 업 비

(단위:백만원)

총사업비			2021년			2022년			2023년			비고
계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비
2,656	2,000	656	519	500	19	637		637	1,500	1,500

❍ 사업내용: 동의보감 시오리길 조성(L=4km) 및 생태 체험학습장 조성 외

❍ 추진현황 및 계획

- 실시설계용역 시행	: 2021.  3월

- 지역개발사업구역지정용역 시행	: 2021.  6월

- 부산지방국토관리청 하천점용 협의	: 2021. 7 ~ 10월

- 편입부지 보상협의 추진	: 2021. 11월

- 지역개발사업구역지정 고시 및 실시계획승인        : 2022.  1월

- 공사 착공 및 준공	: 2023. 1 ~ 12월

농어촌주거환경개선사업 시행으로 낙후된 생활환경 개선

❍ 농촌주택개량사업       : 65동 - 3,250백만원 융자금 지원

❍ 빈집정비사업           : 33동 - 24백만원 보조금 지원

❍ 지붕개량사업           : 31동 - 65백만원 보조금 지원

❍ 가시권 노후불량주택사업: 10동 - 55백만원 사업시행

❍ 장애인 주택 개조사업   :  5동 - 19백만원 사업시행

❍ 빈집실태조사 실시      : 321동 현장조사

전원주택단지 기반시설 지원 및 공동주택 건립으로 인구유입 촉진

❍ 전원주택단지 기반시설 지원: 4개소, 120백만원

- 도로변 전석 쌓기, 배수로 정비, 아스콘 덧씌우기 등

❍ 공동주택 사용승인(시천면): 1단지, 70세대

공공미술 프로젝트 ‘선비문화’ 사업 시행

❍ 목    적: 예술인 일자리 제공 및 주민 문화향유 증진

❍ 위    치: 한국선비문화연구원 본관 및 선비생활관 내

❍ 사업기간: 2020. 9 ~ 2021. 2월

❍ 사 업 비: 금400백만원(국비 320, 군비 80)

❍ 사업내용: 회화, 서예, 공예 등 선비의 향기, 선비문화 등을 주제로 한 미술작품 제작 및 설치(전시)

❍ 추진성과

구분	계	한국화	서양화	서예	조형	도예
작품수	35	7	8	11	7	2

깨끗한 도시경관 조성을 위한 지정게시대 등 정비 시행

❍ 지정게시대 신설 2개소, 교체 1개소 및 정비 34개소

❍ 불법유동광고물 및 옥외광고물 안전점검 실시

- 불법광고물 철거 및 정비(3,170여건), 옥외광고물 안전점검 실시(448여건)

마을정비형 공공임대주택사업 시행

❍ 위    치: 산청읍 옥산리 525번지 일원

❍ 사업기간: 2016 ~ 2022. 8월

❍ 사 업 량: 공공임대주택 150세대 건립(국민100, 영구 20, 행복 30)

❍ 사 업 비: 금23,363백만원(LH 19,834, 산청군 3,529)

❍ 추진사항

- 국토교통부 공모사업 선정                       : 2016. 9.  1.

- 공공주택 지구지정 및 주택건설 사업계획 승인    : 2018. 1.  2.

- 지방재정 투자심의                              : 2018. 3. 26.

- 토지보상(LH 경남지역본부)                      : 2018 ~ 2020. 2월

- 사업착공                                       : 2021. 3. 18.

- 입주자 모집(150세대)                           : 2021. 4. 12.

신안면사무소 복합개발사업 시행

❍ 위    치: 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 사업기간: 2019 ~ 2023. 8월

❍ 사 업 량: 신안면사무소 신축(1동), 공공임대주택(1동, 82세대)

❍ 사 업 비: 금18,900백만원(LH 11,200, 산청군 7,700)

❍ 추진사항

- 국토교통부 공모사업 선정                           : 2019.  6. 25.

- 공유재산심의 및 관리계획 의결                      : 2020.  6. 24.

- 사업계획승인(국토부)                               : 2020. 12. 23.

- 신안면 임시사무소(가설건축물) 준공                 : 2021.  8. 20.

- 사업착공                                          : 2021.  9.  1.

공동주택 관리지원사업 시행

❍ 지원대상: 다우리아파트 외 4단지

❍ 사업기간: 2021. 3 ~ 12월

❍ 사 업 비: 금195백만원

- 공동주택 지원사업(자체사업): 104백만원(군비, 자부담)

- 소규모 공동주택 관리지원사업: 91백만원(도비, 군비, 자부담)

❍ 사업내용: 공동주택 공용시설물 유지보수 사업비 일부 지원

- 외벽도색 3단지, 옥상방수 1단지, 승강기교체 1단지

농림축산식품부 공모사업 선정

❍ 산청군 농촌협약 (남부생활권활성화계획수립)

- 위    치: 산청군 남부생활권(삼장, 시천, 단성, 신안, 생비량, 신등)

- 사업기간: 2022 ~ 2026년(5년간)

- 사 업 비: 금500억원(국비 350, 지방비 150)

- 사업내용: 농촌중심지활성화, 기초생활거점, 취약지역생활여건개조, 농촌공간정비

- 사업효과: 남부생활권의 중심지·배후마을 기능 강화로 편리한 정주 기반 확충

2021년 농촌중심지 활성화사업 추진

❍ 위    치: 생초, 산청, 신등, 차황, 생비량, 신안, 삼장

❍ 사업기간: 2016 ~ 2024년(9년간)

❍ 사 업 비: 금10,363백만원(국비 7,254, 지방비 3,109)

❍ 사업내용: 기초생활기반확충, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업 등

❍ 추진성과

- 생초면: 회관리모델링 완료 / 공사중(90%)

- 산청읍: 시행계획수립 완료 / 공사중(10%)

- 차황면: 기본계획수립 완료, 실시설계 추진중(90%)

- 신등면: 문화센터리모델링 완료 / 공사중(80%)

- 생비량면·신안면: 기본계획수립 추진중(60%)

- 삼장면: 기본계획수립 추진중(20%)

마을만들기 사업 추진

❍ 위    치: 산청군 관내 5개 마을

- 지 구 명: 5개 마을(차황 상중, 오부 양촌, 시천 원리, 신안 벽계, 생비량 장란마을)

❍ 사업기간: 2021년(1년간)

❍ 사 업 비: 금2,100백만원(군비)

❍ 사업내용: 마을회관 신축, 마을경관 개선

❍ 사업효과: 농촌마을 환경개선으로 쾌적한 농촌 공간 조성

산청군 시․군 역량강화사업 추진

❍ 위    치: 산청군 일원

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 12월(1년간)

❍ 사 업 비: 금270백만원(국비 189, 도비 24, 군비 57)

❍ 사업내용: 마을리더교육, 농촌현장포럼, 아름마을 만들기 사업 등

❍ 사업효과: 단계별 지원사업 구축으로 주민역량강화 및 사업운영 지속성 확보

농림축산식품부 공모사업 선정

❍ 사 업 명: 척지 및 구사지구 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

❍ 사업기간: 2021 ~ 2024년(4년간)

❍ 사 업 비: 금3,534백만원(국비 2,637, 도비 268, 군비 629)

- 척지지구: 1,815백만원(국비 1,361, 도비 136, 군비 318)

- 구사지구: 1,719백만원(국비 1,276, 도비 132, 군비 311)

❍ 사업내용: 노후주택·담장 정비, 마을공동이용시설 리모델링 등

❍ 기대효과: 농어촌 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장

새마을금고 최초 발상지 역사관 건립사업 추진

❍ 위    치: 산청군 산청읍 지리 590번지 일원

❍ 사 업 비: 금11,000백만원(새마을금고중앙회 직접 시행)

❍ 사업내용: 역사관 1,975㎡(지상 3층), 부지면적 12,061㎡

❍ 주요시설: 태동지 기념 전시관, 강연장, 갤러리, 체험관 등

❍ 추진현황

- 부지매입                                            : 2019.  9월

- 산청군·새마을금고중앙회 MOU체결                   : 2019. 10월

- 건축설계 및 건축허가                                : 2020.  7월

- 건립사업 시행                             : 2020. 12 ~ 2021. 12월

- 준공 및 개관예정                                    : 2021. 12월

산청 한방항노화 일반산업단지 기업투자촉진지구 지정

❍ 산청 한방항노화 일반산업단지 현황

- 위    치: 산청군 금서면 평촌리 969번지 일원

- 사업기간: 2014 ~ 2019년

- 사 업 비: 금24,700백만원(공영개발 17,800, 산청군(국·도비포함) 6,800, 공법사 100)

- 총 면 적: 158,887㎡(분양대상 면적 110,519㎡)

- 유치업종: 식료품 및 음료제조업, 화장품제조업, 의료용 물질 및 의약품 제조업 등

❍ 경상남도 기업투자촉진지구 지정

- 지 정 일: 2021. 4. 1.

- 입주기업 지원액: 입지보조금 외 4개항목 최대 1,400백만원 내 지원가능
※ 재원: 도비 80%, 군비 20%

하둔마을 공동주차장 조성사업

❍ 사업목적: 새마을금고 역사관 건립에 따른 태동지 하둔마을 주차공간 조성

❍ 위    치: 산청군 생초면 계남리 982-1번지 일원

❍ 면    적: 2,888㎡

❍ 사업내용: 공동주차장, 공원 및 휴게쉼터, 주변정비 등

❍ 사 업 비: 금500백만원(군비)

❍ 추진현황

- 부지 매입                                           : 2021.  5월

- 사업 착공                                           : 2021.  7월

- 사업 준공                                           : 2021. 11월

2. 과 제

도시지역 개발 및 정비를 위한 도시재생사업 추진

❍ 도시지역 확장 및 개발을 위한 도시계획도로 개설 및 도시활력화 사업

❍ 낡고 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생 뉴딜사업

❍ 깨끗하고 안전한 도시환경조성을 위한 도시계획시설 유지보수사업

깨끗한 생활환경 조성을 위한 주거환경개선사업 시행

❍ 농촌주거환경개선사업 시행으로 낙후된 농촌지역 주거환경 개선

❍ 전원주택지 기반시설 지원사업으로 귀농·귀촌 인구유입 촉진

공공임대주택 건립으로 저소득층 등을 위한 주거복지 실현

❍ 공공임대주택 건립으로 주거안정 도모와 주택 부족 문제 해소

❍ 저소득층 및 장애인 등을 위한 주거복지 실현으로 삶의 질 향상

노후 공공주택 및 지정게시대 정비로 쾌적한 생활환경 조성

❍ 노후 공공주택 정비사업 시행으로 주민불편 해소 및 생활환경 개선

❍ 지정게시대 신설 및 보수로 도시 경관 개선 및 쾌적한 환경조성

농촌개발사업 추진으로 농촌 균형 발전

❍ 일반농산어촌개발사업 추진으로 쾌적한 정주환경 조성

❍ 인구유입 및 택지수요에 대한 체계적인 개발계획 수립

❍ 농촌개발 사업의 성공적 추진을 위한 주민역량 강화

농어촌 취약지역 생활여건 개조(새뜰마을)사업 추진

❍ 2019년 선정사업: 오전지구(오전ㆍ내평ㆍ신기마을) 세부사업 시행

❍ 2020년 선정사업: 노은 및 방화지구 시행계획 수립

❍ 2021년 선정사업: 척지 및 구사지구 기본계획 및 시행계획 수립

❍ 2022년 공모신청: 2개마을 4,000백만원 정도

- 관내 전마을 전수조사를 통해 공모 선정 가능성이 높은 마을 신청

한방항노화 일반산업단지 투자기업 유치

❍ 지역경제 활성화를 위한 투자기업 유치 추진

❍ 행정·재정적 지원제도(투자촉진지구 보조금 지원 등)를 통한 투자기업 유치

새마을금고 역사관 준공·운영에 따른 연계사업 지원

❍ 역사관 방문객에 대한 우리군 문화 ‧ 예술 ‧ 관광 인프라 지원

❍ 동의보감촌, 한방항노화, 힐링프로그램 등 다양한 체험활동 연계

❍ 역사관 준공에 따른 최초 발상지 추가 연계사업 유치 추진

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
활기찬 지역발전 인프라 구축

⇑

	역점시책
도시의 개발과 도시재생 뉴딜사업 추진 농촌주거환경개선 및 주거복지사업 추진 농촌개발사업 추진으로 농촌 균형 발전 미래전략 사업추진 및 투자유치 활성화

⇑

	역점시책별 이행과제
도시의 개발과 도시재생 뉴딜사업 추진 ◦ 도시지역 확장과 개발을 위한 도시계획도로 개설 및 도시활력화사업 ◦ 낡고 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생 뉴딜사업 ◦ 깨끗하고 안전한 도시환경조성을 위한 도시계획시설 유지보수사업 ◦ 볼거리 및 체험을 위한 동의보감 시오리길 조성사업 농촌주거환경개선 및 주거복지사업 추진 ◦ 농촌주거환경개선 사업 ◦ 전원주택단지 기반시설 지원사업 ◦ 공공임대주택 건립사업 추진 ◦ 산청군 공동주택 관리지원 사업

	역점시책별 이행과제
농촌개발사업 추진으로 농촌 균형 발전 ◦ 일반농산어촌개발사업 추진으로 쾌적한 정주환경 조성 ◦ 인구유입 및 주거환경 조성을 위한 대지조성사업 추진 ◦ 농촌개발 사업의 성공적 추진을 위한 주민역량 강화 미래전략 사업추진 및 투자유치 활성화 ◦ 미래전략 사업추진으로 살기 좋은 명품산청·행복산청 실현 ◦ 기업 투자유치를 통한 지역경제 활성화

Ⅳ. 2022년도 주요업무계획

활기찬 지역발전 인프라 구축

도시의 개발과 도시재생 뉴딜사업 추진

농촌주거환경개선 및 주거복지사업 추진

농촌개발사업 추진으로 농촌 균형 발전

미래전략 사업추진 및 투자유치 활성화

역점시책

1. 도시의 개발과 도시재생 뉴딜사업 추진

역점

시책

도시의 확장과 개발을 위한 도시계획도로 개설 및 도시활력화사업

❍ 대상지역: 산청군 도시지역 내

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 12월

❍ 사 업 비: 7,725백만원(도비 300, 군비 7,425)

❍ 사업내용

- 도시지역 확장을 위한 도시계획도로 개설사업

- 기존 도로 확장 등 도시지역 활력 증진을 위한 도시활력화사업

- 도시지역의 정주여건 개선을 위한 주민편의시설(주차장, 공원 등) 정비사업

❍ 추진계획

- 실시설계 및 주민설명회	: 2022. 1 ~  2월

- 편입부지 보상협의	: 2022. 3 ~  4월

- 공사 착공 및 준공	: 2022. 5 ~ 12월

낡고 쇠퇴한 원도심 활성화를 위한 도시재생 뉴딜사업

❍ 도시재생 뉴딜사업 신규 공모 추진

구분	위치	사업유형	구역면적	사업기간	사업비(억원)					사업내용	비고
					계	국	도	군	기타
옥산 지구	산청읍 옥산리 지리 일원	일반근린형	148,000㎡	2022 ~ 2025년	167	100	20	47	-	․ 거점공간시설 건립 ․ 주민 소득증대사업 외
배양 지구	단성면 사월리 배양마을	소규모 예비사업	84,000㎡	2022년	2	1	-	1	-	․ 가로정비사업 ․ 주민역량강화사업 외

깨끗하고 안전한 도시환경조성을 위한 도시계획시설 유지보수사업

❍ 대상지역: 산청군 도시지역 내

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 12월

❍ 사 업 비: 금650백만원(군비)

❍ 사업내용

- 노후 도시계획도로 재포장 및 차선도색 사업

- 도로측구 및 집수정, 맨홀 등 배수시설 정비

- 도시계획도로 주변 풀베기 및 환경정비사업

- 도시공원 시설물 정비 및 풀베기 사업

❍ 추진계획

- 대상지 조사 및 실시설계	: 2022. 1 ~  2월

- 공사 착공 및 준공	: 2022. 3 ~ 12월

볼거리 및 체험을 위한 동의보감 시오리길 조성사업

❍ 위    치: 산청군 금서면 매촌리~특리 일원

❍ 사업기간: 2021 ~ 2023년(3년)

❍ 사업내용: 동의보감 시오리길 조성(L=4km) 및 생태 체험학습장 조성 외

❍ 사 업 비

(단위:백만원)

총사업비			2021년			2022년			2023년			비 고
계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비
2,656	2,000	656	519	500	19	637	-	637	1,500	1,500	-

❍ 추진계획

- 편입부지 보상협의 추진	: 2021. 11월

- 지역개발사업구역지정 고시(경상남도)	: 2022.  1월

- 실시계획승인(경상남도)	: 2022.  3월

- 공사 착공 및 준공	: 2023. 1 ~ 12월

2. 농촌주거환경개선 및 주거복지사업 추진

역점

시책

농촌주거환경개선사업

❍ 대 상 자: 노후 주택 및 빈집 소유자(관리자)

❍ 사 업 비: 금3,274백만원(융자 3,250, 보조 24)

❍ 사 업 량: 주택개량사업 65동, 빈집정비사업 33동

❍ 사업내용: 노후 주택 신축 및 철거사업 시행

전원주택단지 기반시설 지원사업

❍ 위    치: 산청군 관내 전원주택단지

❍ 사 업 비: 금120백만원(군비)

❍ 사 업 량: 전원주택단지 4개소

❍ 사업내용: 입주민 불편 해소를 위한 기반시설 지원

(마을안길 재포장, 진입도로 포장 등)

※ 2021년 현황조사 결과: 전원주택단지 75개소 1,551세대

공공임대주택 건립사업 추진

❍ 위    치: 산청읍 옥산리, 신안면 하정리 일원

❍ 사 업 비: 금42,260백만원(LH 31,030, 군비 11,230)

❍ 사 업 량: 232세대 건립(국민 134, 영구 20, 행복 78)

❍ 사업내용: 공공임대아파트 및 주민편의시설 등 건립

산청군 공동주택 지원사업

❍ 지원대상: 산청군 관내 공동주택 단지

❍ 사 업 비: 금120백만원(군비, 자부담)

❍ 지원조건: 사용승인 후 10년이 경과된 공동주택

- 20세대 이상: 70%이내 지원

- 20세대 미만: 90%이내 지원   ※ 단지별 최고 50백만원(초과분 자부담)

❍ 사업내용: 공용시설물(옥상방수 등)의 유지 보수사업비 일부 보조

3. 농촌개발사업 추진으로 농촌 균형 발전

역점

시책

일반농산어촌개발사업 추진으로 쾌적한 정주환경 조성

❍ 농촌중심지활성화 및 기초생활거점사업 추진

- 위    치: 산청, 차황, 신안, 생비량, 삼장, 시천(신규), 단성(신규)

- 사업기간: 2018 ~ 2025년(8년간)

- 사 업 비: 금59,330백만원(국비 41,531, 도비 5,530, 군비 12,269)

(단위:백만원)

읍면	재 원 별				기 투 자				2022년				2022년 이후	비고
	계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비	계	국비	도비	군비
계	59,330	41,531	5,530	12,269	14,935	10,455	1,343	3,137	13,954	9,769	1,256	2,929	30,441
산청읍	12,000	8,400	1,080	2,520	9,194	6,436	827	1,931	2,806	1,964	253	589
차황면	4,000	2,800	360	840	1,250	875	112	263	2,750	1,925	248	577
신안면	19,000	13,300	1,710	3,990	3,421	2,395	308	718	3,007	2,105	270	632	12,572
생비량면	4,000	2,800	360	840	867	607	78	182	2,348	1,644	211	493	785
삼장면	4,000	2,800	360	840	203	142	18	43	1,467	1,027	132	308	2,330
시천면	12,000	8,400	1,080	2,520					935	655	84	196	11,065	신규
단성면	4,000	2,800	360	840					311	218	28	65	3,689	신규
시군역량강화	330	231	30	69					330	231	30	69		신규

❍ 사업내용: 기초생활기반확충, 지역경관개선사업, 지역역량강화사업 등

❍ 추진계획

- 산청읍: 건강누리센터, 이색테마공원, 배후마을지원센터등

- 차황면: 문화센터 신축, 가로정비 등

- 신안면: 기본계획수립 완료(2022. 6월), 시행계획추진(2022. 6월)

- 생비량면: 시행계획추진(2022. 1월), 공사착수(2022. 6월)

- 삼장면: 시행계획 수립(2022. 1 ~ 12월)

- 시천면·단성면: 기본계획 수립(2022. 1 ~ 12월)

❍ 마을만들기 사업 추진

- 사업대상: 산청군 산청읍 송경마을 외 5개소

- 사 업 비: 금2,000백만원(군비)

- 사업내용: 기반시설확충 및 마을경관 개선

인구유입 및 주거환경 조성을 위한 대지조성사업 추진

구분	부리지구	매촌지구
위 치	산청읍 부리 산92번지 일원	금서면 매촌리 산615-1번지 일원
사업면적	49,318㎡	75,838㎡
사업기간	2019 ~ 2022년	2020 ~ 2024년
사 업 비	5,600백만원(기투자 3,500, 22년 2,100)	14,400백만원(기투자 2,700, 22년 6,000, 향후 5,700)
계획인구	100명 / 40세대	792명 / 360세대
시행방식	지구단위계획구역	도시개발사업
시 행 자	산청군수	산청군수

농촌개발 사업의 성공적 추진을 위한 주민역량 강화

❍ 2022년 역량강화사업 및 농촌현장포럼 추진

- 사업대상: 산청군 관내

- 사 업 비: 금330백만원(국비 231, 도비 30, 군비 69)

- 사업내용: 농촌협약지원센터운영, 마을리더교육, 농촌현장포럼,

아름마을만들기사업 등

4. 미래전략 사업추진 및 투자유치 활성화

역점

시책

미래전략 사업추진으로 살기 좋은 명품산청·행복산청 실현

❍ 농어촌 취약지역 생활여건 개조(새뜰마을)사업 지속 추진

- 사업내용: 노후주택정비, 기초생활 인프라 개선, 경관시설 정비 등

대상지구	사업기간	사업비(백만원)	비고
계		9,766
오전지구 (오전,내평,신기)	2019 ~ 2022년	2,308	·기본·시행계획 수립 완료 ·사업 시행중
생초면 노은지구	2020 ~ 2023년	1,844	·기본계획 수립 완료 ·시행계획 수립중
생비량면 방화지구	2020 ~ 2023년	2,080	·기본계획 수립완료 ·시행계획 수립중
산청읍 척지지구	2021 ~ 2024년	1,815	·기본계획 수립중
단성면 구사지구	2021 ~ 2024년	1,719	·기본계획 수립중

- 2022년 새뜰마을사업 공모 신청: 2개마을 4,000백만원 정도

◦전읍면 대상마을 사전 조사 및 평가 실시

◦예비계획 수립 및 공모 신청

❍ 새마을금고 역사관 준공·운영에 따른 연계사업 지원

- 역사관 방문객에 대한 우리군 문화 ‧ 예술 ‧ 관광 인프라 지원

- 동의보감촌, 한방항노화, 힐링프로그램 등 다양한 체험활동 연계

- 역사관 준공에 따른 최초 발상지 추가 연계사업 유치 추진

기업 투자유치를 통한 지역경제 활성화

❍ 한방항노화 일반산업단지 분양을 위한 적극행정 추진

- 관내·외 타깃업체 유치를 위한 방문홍보 강화(경남개발공사 협업)

- 행정·재정적 지원제도(투자촉진지구 보조금 지원 등)를 통한 투자기업 유치

❍ 기업유치를 위한 투자인센티브 제도 적극 홍보 추진

- 투자를 희망하는 기업에 투자인센티브 제도 적극 안내·홍보

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업

산청군 비시가화지역 토지적성평가 용역

도시재생뉴딜 공모사업 추진

도시개발사업

동의보감 시오리길 조성사업

산청군 마을정비형 공공임대주택 사업

신안면사무소 복합개발사업

공동주택 관리지원사업

농촌협약(남부생활권 활성화)추진

부리지구 대지조성사업

매촌지구 도시개발사업

마을만들기 사업 추진

새마을금고 역사관 운영에 따른 연계사업 추진

한방항노화 일반산업단지 분양 추진

농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

1. 산청군 비시가화지역 토지적성평가 용역

❖ 우리군 비시가화지역(주거, 상업, 공업지역을 제외한 지역)을 대상으로 토지적성평가 결과를 사전에 확보함으로써 관리계획에 대한 정량적, 객관적, 체계적인 판단 근거를 마련하고자 함

※「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제27조제3항 및「토지의 적성평가에 관한 지침」에 따라

5년마다 토지적성평가를 시행토록 명시(우리군 2017년 기시행)

사업개요

❍ 위    치: 산청군 전역(비시가화 지역)

❍ 사업기간: 2021. 7 ~ 2022. 7월

❍ 사 업 비: 금166백만원(토지적성평가용역:136, 검증수수료:30)

❍ 사업내용

- 토지적성평가를 위한 기초자료수집 및 정비

- 우리군 지역 특성을 고려한 평가지표의 선정 및 평가 기준 선정

- 토지적성평가 및 우리군 입안구역 적용기준 재검토 마련

- 토지적성평가 결과의 관리시스템 등재

그간 추진사항 및 추진계획

❍ 조달 계약	:	2021. 7. 2.
❍ 사업 착수	:	2021. 7. 7.
❍ 토지적성평가 수행결과 납품	:	2022. 4월
❍ 토지적성평가 용역결과 검증의뢰 및 용역 완료	:	2022. 7월

기대효과

❍ 군 전체의 계획적 관리를 위한 기초자료(개발가능지 등) 확보

❍ 공간정책 및 계획수립을 위한 정량적·객관적·체계적인 판단 근거 마련

❍ 기 추진 이후 여건 변화(농지 및 산지 해제)에 따른 민원해소

2. 도시재생뉴딜 공모사업 추진

❖ 낡고 쇠퇴한 원도심의 주거안정과 새로운 성장동력 확보를 위하여

□ 도시재생 뉴딜사업은 단순한 주거정비 사업이 아니라 도시를 재활성화시켜 도시의 경쟁력을 높이고자 하는 도시혁신사업

추진방향

❍ 우리 군 도시지역 중 낡고 쇠퇴한 원도심의 지역역량 강화와 지역자원 활용을 위해 국토교통부의 신규 공모사업 신청 및 선정으로 도시지역의 경제적․사회적․물리적․환경적 활성화에 기여

추진현황

구분	위치	사업유형	구역면적	사업기간	사업비(억원)					사업내용	비고
					계	국	도	군	기타
옥산 지구	산청읍 옥산리 지리 일원	일반근린형	148,000㎡	2022 ~ 2025년	167	100	20	47	-	․ 거점공간시설 건립 ․ 주민 소득증대사업 외
배양 지구	단성면 사월리 배양마을	소규모 예비사업	84,000㎡	2022년	2	1	-	1	-	․ 가로정비사업 ․ 주민역량강화사업 외

추진계획

❍ 배양지구 소규모예비사업 공모 신청	: 2021. 10월

❍ 옥산지구 활성화계획(변경) 용역 시행	: 2022. 1 ~ 4월

❍ 2022년 도시재생뉴딜 공모사업 신청	: 2022. 4 ~ 5월

기대효과

❍ 기반시설 정비를 통한 주거지역 경쟁력 제고

❍ 다양한 세대를 아우르는 소통체계와 문화형성, 공동체간 협력 강화

❍ 정주여건 개선으로 인구유입 및 지역경제 활성화

3. 도시개발사업

❖ 무질서한 난개발을 방지하고 계획적이고 체계적인 도시개발을 통한 토지

효율성 증진과 기반시설 확충으로 주민의 삶의 질 향상과 지역경제 활성화 도모

산청 하정지구 도시개발사업

❍ 사업개요

- 위    치: 산청군 신안면 하정리 산58번지 일원

- 사업면적: 47,320㎡

- 사업기간: 2020. 6. 11. ~ 2024. 12. 10.(4년 6개월)

- 사 업 비: 금26,578백만원

- 계획인구/세대수: 1,003명/401세대(공동주택 390세대, 단독주택 11세대)

- 시행방식: 수용 또는 사용방식

❍ 사업시행자: ㈜하정개발 대표 하치남(산청군 신안면 원지로 13)

❍ 그간 추진사항 및 계획

- 하정지구 도시개발구역지정 제안 및 수용              : 2018. 11월

- 하정지구 도시개발구역 지정 및 지형도면 고시(경상남도) : 2020. 6월

- 도시개발사업 시행자 지정(경상남도)                    : 2020.  8월

- 실시계획인가 신청서 제출(산청군→경상남도)           : 2021.  3월

- 실시계획인가 신청서 보완(환경 및 재해)               : 2021. 6~9월

- 실시계획인가 고시(경상남도) 및 사업착공              : 2021. 11월

산청 원지지구 도시개발사업

❍ 사업개요

- 위    치: 산청군 신안면 하정리 299번지 일원

- 사업면적: 86,528㎡

- 사업기간: 2021 ~ 2023년(3년)

- 사 업 비: 금16,961백만원

- 계획인구/세대수: 541명/246세대(연립주택 144세대, 단독주택 102세대)

- 시행방식: 환지방식

❍ 사업시행자: (가칭) 원지지구 도시개발사업조합(진주시 진주대로 897)

❍ 그간 추진사항 및 계획

- (가칭)원지지구 도시개발사업조합 창립                  : 2020.  8월

- 도시개발구역지정 제안을 위한 산청군계획위원회 사전자문: 2021. 4월

- 원지지구 도시개발구역지정 제안(조합→산청군)      : 2021. 10~11월

- 주민의견 청취 및 관련부서(기관) 협의                 : 2021. 11월

- 산청군계획위원회 자문                               : 2021. 12월

- 도시개발구역지정 요청(산청군→경상남도)              : 2022.  1월

4. 동의보감 시오리길 조성사업

❖ 산청 읍내와 동의보감촌을 잇는 경호강변을 따라 경호강, 산림길 등 수려한 자연경관을 만끽하며 산책할 수 있는 동의보감 시오리길 조성

사업개요

❍ 위    치: 산청군 금서면 매촌리~특리 일원

❍ 사업기간: 2021 ~ 2023년(3년)

❍ 사업내용: 동의보감 시오리길 조성(L=4.0km) 및 생태 체험학습장 조성 외

❍ 사 업 비

(단위:백만원)

총사업비			2021년			2022년			2023년			비 고
계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비	계	국비	군비
2,656	2,000	656	519	500	19	637	-	637	1,500	1,500	-

그간 추진사항 및 향후계획

❍ 실시설계용역 시행	: 2021.  3월

❍ 지역개발사업구역지정용역 시행	: 2021.  6월

❍ 부산지방국토관리청 하천점용 협의	: 2021. 7~10월

❍ 편입부지 보상협의 추진	: 2021. 11월

❍ 지역개발사업구역지정 고시(경상남도)	: 2022.  1월

❍ 실시계획승인(경상남도)	: 2022.  3월

❍ 공사착공 및 준공	: 2023. 1~12월

기대효과

❍ 지역자원의 활용 및 관광지 연계강화를 통해서 방문객들에게 볼거리 및 체험 제공으로 관광산청 이미지 제고

❍ 관광지 연계로 지역경제 활성화 기여

5. 산청군 마을정비형 공공임대주택 사업

❖ 공공임대주택 건립으로 기초생활 수급자 및 무주택 서민의 주거안정을 도모하고 주택부족 문제를 근본적으로 해결하고자 함

추진방향

❍ 사업주체: 산청군, 한국토지주택공사(LH)

사업개요

❍ 위    치: 산청읍 옥산리 525번지 일원

❍ 사업기간: 2016 ~ 2022. 12월

❍ 사 업 비: 금23,363백만원(LH 19,834, 산청군 3,529)

❍ 사업내용: 공공임대주택 150세대 건립

(※ 국민임대 100, 영구임대 20, 행복주택 30)

그간 추진사항 및 계획

❍ 국토교통부 공모사업 선정                      : 2016. 9. 1.

❍ 공공주택 지구지정 및 주택건설 사업계획 승인   : 2018. 1. 2.

❍ 경남도 지방재정 투자심의 승인                 : 2018. 3. 26.

❍ 토지보상(LH 경남지역본부)                     : 2018~2020. 2월

❍ 주택건설 사업계획 변경승인                    : 2020. 10. 26.

❍ 사업착공                                      : 2021.  3. 18.

❍ 공공주택 준공 및 입주(예정)                    : 2022. 12월

기대효과

❍ 저소득층 및 무주택 서민의 주거 문제 해소로 주거복지 실현

6. 신안면사무소 복합개발사업

❖ 노후된 신안면사무소 재건축 및 공공임대주택 건설로 행정서비스

향상 및 질 높은 주거공간 제공

추진방향

❍ 사업주체: 산청군, 한국토지주택공사(LH)

사업개요

❍ 위    치: 신안면 하정리 754-1번지 일원

❍ 사업기간: 2019 ~ 2023. 8월

❍ 사 업 비: 금18,900백만원(LH 11,200, 산청군 7,700)

❍ 사업내용: 신안면사무소 재건축 및 공공임대주택 82세대 건립

(※ 국민임대 30, 행복주택 52)

그간 추진 및 계획

❍ 국토교통부 공모사업 선정                       : 2019.  6. 25.

❍ 공유재산심의 및 관리계획 의결                  : 2020.  6. 24.

❍ 사업계획 승인                                  : 2020. 12. 23.

❍ 신안면 임시사무소(가설건축물) 준공              : 2021.  8. 20.

❍ 사업착공                                       : 2021.  9.  1.

❍ 공공주택 준공 및 입주(예정)                     : 2023. 8월

기대효과

❍ 노후 공공청사 재건축으로 주민들에게 질 높은 행정서비스 제공

❍ 신혼부부, 사회초년생 등에게 공공임대주택 제공으로 정주여건 조성 및

인구 유입

7. 공동주택 관리지원사업

❖ 공동주택의 관리에 필요한 비용을 지원함으로써 공동주택의 안전관리와 쾌적하고 살기 좋은 주거환경 조성

추진방향

❍ ｢경상남도 주택 조례｣에 따른 소규모 공동주택 관리지원사업

❍ ｢산청군 공동주택 관리 지원 조례｣에 따른 산청군 공동주택 관리지원사업

사업개요

❍ 2022년 소규모 공동주택 관리지원사업

- 사 업 비: 금30백만원(도비 4.5, 군비 10.5, 자부담 15)

- 사업내용: 안전사고 발생 우려 옥외시설물 안전조치 및 보수 등

- 지원대상: 사용검사일로부터 20년 이상 경과한 소규모 공동주택

- 그간 지원 현황

구 분	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
사업비(백만원)	235	70	-	38	36	91
단지수	8	2	-	3	1	2
세대수	851	181	-	369	141	160

❍ 2022년 산청군 공동주택 관리지원사업

- 사 업 비: 금120백만원(군비 60, 자부담 60)

- 사업내용: 단지 내 외벽도색, 주차장 보수, 옥상방수 등

- 지원대상: 사용검사일로부터 10년 이상 경과한 공동주택

- 그간 지원 현황

구 분	계	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
사업비(백만원)	1,432	492	303	177	356	104
단지수	26	7	6	3	7	3
세대수	1,052	135	392	200	258	67

추진계획

❍ 공동주택 관리지원사업 신청 공고                : 2022. 2월

❍ 산청군 지방보조금관리위원회 심의 및 결정       : 2022. 3월

❍ 사업시행 및 사업비 정산                        : 2022. 4~11월

기대효과

❍ 공동주택의 안전한 관리와 쾌적한 주거환경 조성

8. 농촌협약(남부생활권활성화) 추진

❖ 농촌지역의 생활서비스 격차를 해소하기 위해 생활권역으로 중심지·

거점·마을간 서비스 기능의 연계 및 보완을 목표로 남부 생활권

활성화 계획을 수립

사업현황

❍ 사업대상: 산청군 남부생활권(6개면)

(신안면, 시천면, 단성면, 신등면, 생비량면, 삼장면)

❍ 사 업 비: 금59,470백만원(국비 34,850 지방비 23,790 자부담 830)

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026년(5년간)

❍ 사업내용:

	읍면	사업명	사업비(백만원)	사업내용	비고
일반농산어촌개발	시천면	농촌중심지활성화	12,000	시천 문화복지 거점센터, 세대이음 프로그램
	단성면	기초생활거점조성	4,000	단성 문화복합센터, 생활문화 서비스
	신등면	기초생활거점(2단계)	1,330	배후마을 전달서비스, 문화프로그램
	단성면	테마형 서비스거점	500	창촌리 금만복지센터
	남부 생활권	농촌유휴시설 창업지원	200	창업지원시설 조성(시천 중산리)
		농촌형교통모델	300	교통소외지역 문화버스(소형) 지원
	산청군	시군역량강화	2,000	주민교육, 운영컨설팅, 중간지원조직 운영
농촌재생	신등면	농촌공간정비계획	29,400	축사철거, 스마트팜조성
기타	남부 생활권	취약지역생활여건개조	8,980	빈집정비, 슬레이트 지붕 교체 재래식화장실 개선, 마을안길정비
		농촌축제지원(6개면)	60	지역특화 자원 활용 축제운영
		농촌교육·문화·복지지원	50	마을 생활환경개선, 문화증진 (마근담마을, 간디숲속마을)
		농촌관광활성화	500	농촌관광 활성화 교육, 홍보, 시설보강 (단성면 지리산 덕천강마을)
		농촌집고쳐주기(6개면)	150	노후주택 집수리
	소계		59,470

기대효과

❍ 생활밀착형 인프라 구축으로 질 높은 정주환경 조성

❍ 지역 특화자원 가치 확산으로 농촌 자립경제 도모

❍ 주민 인적자원 발굴·육성을 통한 공동체 네트워크 형성

9. 부리지구 대지조성사업 추진

❖ 신규 대지조성으로 귀농 ․ 귀촌 인구유입 증대 유도

❖ 도시기반구역 확충과 도시지역 택지난 해소  및 부동산 가격 안정화 도모

❖ 귀농 ․ 귀촌자들의 택지 수요 증가로 안정적인 택지공급에 기여

추진방향

❍「주택법」에 따른 대지조성사업으로 추진

사업개요

❍ 위    치: 산청읍 부리 산92번지 일원

❍ 사업기간: 2019 ~ 2022년(4년간)

❍ 계획인구 및 세대수: 100명 / 40세대

❍ 총사업비: 금5,600백만원(시설비 3,400, 보상비 2,200)

구 분	총사업비	기투자	2021년	2022년	비고
계	5,600	1,900	1,600	2,100
국 비
도 비
군 비	5,600	1,900	1,600	2,100

❍ 사업내용: 대지조성 A=49,318㎡

그간추진 및 향후계획

❍ 기본계획 및 타당성 조사                          : 2019.  1월

❍ 공유재산 관리계획수립                           : 2019.  3월

❍ 부리지구 지구단위계획수립                       : 2020.  1월

❍ 부리지구 사업계획승인 및 사업착수               : 2021.  1월

❍ 토취장 활용 및 토공사                            : 2021.  2월

❍ 공사준공                                        : 2022. 12월

❍ 분양계획수립 및 분양                             : 2023.  2월

기대효과

❍ 체계적인 도시개발로 쾌적한 주거환경 조성 및 공공복리 증진

❍ 합리적인 공간구조 및 안락한 정주체계의 확립

10. 매촌지구 도시개발사업 추진

❖ 금서면 소재지의 도시지역 확대를 위한 부지가 절대 부족한 실정임

□ 따라서 귀농 ․ 귀촌 증가 등으로 인한 안정적 주택난 해소를 위하여 도시개발사업을 추진하고자 함

추진방향

❍「도시개발법」에 따른 도시개발사업으로 추진

사업개요

❍ 위    치: 금서면 매촌리 일원

❍ 사업기간: 2020 ~ 2023년(4년간)

❍ 계획인구 및 세대수: 792명 / 360세대

❍ 총사업비: 금14,400백만원(시설비 6,865, 보상비 5,031 기타 2,504)

구분	총사업비	기투자	2021년	2022년	향후	비고
계	14,400	1,250	1,420	5,000	6,730
국 비
도 비
군 비	14,400	1,250	1,420	5,000	6,730

❍ 사업내용: 도시개발(대지조성) A=75,838㎡

추진계획

❍ 지방재정투자심사                                 : 2019.  7월

❍ 공유재산 관리계획수립                            : 2019. 12월

❍ 매촌지구 도시개발구역지정 및 개발계획수립용역    : 2020.  4월

❍ 도시개발구역 지정 및 계발계획수립 고시           : 2021. 12월

❍ 실시계획인가 고시 및 사업착수                    : 2022.  4월

기대효과

❍ 부족한 택지개발로 부동산 가격안정

❍ 도시구역 확장과 귀농 ․ 귀촌인들의 안정적 택지공급 기여

11. 마을만들기 사업 추진

❖ 마을역량에 맞는 단계별 지원을 통해 마을을 체계적으로 발전시켜 누구나 살고 싶어 하는 농촌마을을 조성코자 함

❖ 쾌적한 주거공간 조성과 농촌다운 자연경관을 유지토록 시설 정비

추진방향

❍「농어촌정비법」에 따른 농산어촌개발사업으로 추진

사업개요

❍ 사 업 명: 마을만들기 사업

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 12월(1년간)

❍ 총사업비: 금2,000백만원(군비)

❍ 사업지구: 산청읍 송경마을 외 5개마을

❍ 사업내용: 기반시설확충 및 마을경관정비

그간 추진 및 향후계획

❍ 농촌현장포럼 실시                                 : 2021.  1월

❍ 마을자원 및 현장조사                              : 2021.  9월

❍ 실시설계용역 시행                                 : 2022.  1월

❍ 시행계획 수립 및 공사착수                           : 2022.  4월

❍ 공사 준공                                        : 2022. 11월

기대효과

❍ 농촌지역 환경개선으로 쾌적한 공간 조성

❍ 새로운 주거환경 조성을 통한 도시민 인구유입 및 지역활성화 유도

12. 새마을금고 역사관 운영에 따른 연계사업 추진

❖ 새마을금고 최초 발상지 역사관 건립에 따른 방문객에 대하여 우리군

연계사업 지원으로 지역경제 활성화 기여

추진방향

❍ 역사관 방문객에 대한 우리군 문화 ‧ 예술 ‧ 관광 인프라 지원

❍ 동의보감촌, 한방항노화, 힐링프로그램 등 다양한 체험활동 연계

역사관 개요

❍ 위    치: 산청군 산청읍 지리 590번지 일원

❍ 사 업 비: 금11,000백만원(새마을금고 중앙회 직접 시행)

❍ 사업내용: 역사관 1,975㎡(지상 3층), 부지면적 12,061㎡

❍ 주요시설: 태동지 기념 전시관, 강연장, 갤러리, 체험관 등

그간 추진사항

❍ 예정부지 현장방문, 타당성 분석 및 선정   : 2018. 10 ~ 2019.  5월

❍ 산청군-새마을금고중앙회 협약(MOU) 체결           : 2019. 10월

❍ 건축설계 및 건축허가                             : 2020.  7월

❍ 준공 및 개관                                     : 2021. 12월

추진계획

❍ 역사관 개관에 따른 전국 금고회원 방문계획 추진: 150명/평일

※ 전국 금고수 1,300여개, 점포수 3,245개, 회원수 2,100만명

❍ 동의보감촌, 한방항노화, 힐링프로그램 등 다양한 체험활동 연계

❍ 방문객에 대한 우리군 관광코스 등 문화 ‧ 예술 ‧ 관광 인프라 지원

❍ 관내 숙박시설, 식당, 농특산물 판매지원 등 지역경제 활성화 추진

❍ 역사관 준공에 따른 최초 발상지 추가 연계사업 유치 추진

기대효과

❍ 최초 발상지 군민 자긍심 고취 및 방문객 유치로 지역경제 활성화

❍ 새마을금고 후속사업 투자 집중화를 위한 유치여건 기반 마련

13. 한방항노화 일반산업단지 분양 추진

❖ 경기침체로 인한 MOU체결업체 입주포기에 따라 적극적인 기업

투자유치를 통한 분양률 제고 기여

추진방향

❍ 한방항노화 투자기업 발굴로 침체된 항노화 산업단지 활력 제고

❍ 행정·재정적인 지원제도 마련을 통해 투자기업 유치

사업개요

❍ 위    치: 금서면 평촌리 969번지 일원(158,887㎡)

❍ 분양면적: 110,519㎡, 34필지(산업시설 16, 복합시설 5, 지원시설 10, 주차장 3)

❍ 분양단가: 산업시설 0.161백만원/㎡, 복합용지 0.172백만원/㎡

❍ 사업시행자: 경남개발공사(공영개발)

❍ 유치업종: 식료품, 음료, 화장품, 의료용물질 및 의약품 제조업 등

그간 추진사항

❍ 관내·외 타깃업체 및 제약회사 분양홍보 DM발송     : 2019. 7월

❍ 부동산 중개알선 수수료 지급제도 시행(경남개발공사)      : 2020. 1월

❍ 항노화 산업단지 투자유치 관계기관 간담회 개최      : 2020. 3월

❍ 분양홍보 신문광고 게제(5개 신문사) 및 팸플릿 제작   : 2020. 6월

❍ 경상남도「기업투자촉진지구」지정                   : 2021. 4월

추진계획

❍ 한방항노화 일반산업단지 분양을 위한 적극행정 추진

❍ 관내·외 타깃업체 유치를 위한 방문홍보 강화(경남개발공사 협업)

❍ 행정·재정적 지원제도(투자촉진지구 보조금 지원 등)를 통한 투자기업 유치

기대효과

❍ 한방항노화 특화 및 연관업종 유치를 통한 지역경제 성장 기반 마련

14. 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업

❖ 안전·위생 등 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등을    통한 취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장

추진방향

❍ 효율적인 사업추진을 위한 전문기관인 농어촌공사 위탁 시행

❍ 사업추진위원회를 통한 주민의견 수렴 및 반영

사업개요

(단위: 백만원)

대상지구	사업기간	사업비	사업내용	비고
계		9,766
오전지구 (오전,내평,신기)	2019 ~ 2022년	2,308	·노후 주택정비·기초생활 인프라 개선 ·주민공동시설: 부곡 목욕탕 리모델링, 신기 마을회관 신축 등 ·경관시설(담장) 정비 등	·기본계획 수립 완료 ·시행계획 수립완료 ·사업 시행중
생초면 노은지구	2020 ~ 2023년	1,844	·노후 주택정비·기초생활 인프라 개선 ·주민공동시설: 마을공동화장실 정비 ·경관시설(담장) 정비 등	·기본계획 수립 완료 ·시행계획 수립중
생비량면 방화지구	2020 ~ 2023년	2,080	·노후 주택정비·기초생활 인프라 개선 ·주민공동시설: 마을회관 및 공동작업장 신축 등 ·경관시설(담장) 정비 등	·기본계획 수립완료 ·시행계획 수립중
산청읍 척지지구	2021 ~ 2024년	1,815	·노후 주택정비 ·생활·위생·안전 인프라 개선 ·마을환경개선 등	·기본계획 수립중
단성면 구사지구	2021 ~ 2024년	1,719	·노후 주택정비 ·생활·위생·안전 인프라 개선 ·마을환경개선 등	·기본계획 수립중

추진계획

❍ 각 지구·마을별 기본·시행계획 수립 및 공사 시행

❍ 2022년 새뜰마을사업 공모 신청 추진: 2개마을 4,000백만원 정도

기대효과

❍ 농어촌 취약지역을 개선하여 주민의 기본적인 생활수준 보장

Ⅵ. 신규(특수) 시책

농촌공간 유해시설(축사) 정비로 살기좋은

정주여건 개선

경호강따라 수계정공원 산책로 설치

1. 농촌공간 유해시설(축사) 정비로 살기좋은 정주여건 개선

❖ 악취발생 민원이 지속적으로 제기된 축사시설을 정비하여 정주여건을

개선하고 청정산청 이미지 향상 제고

추진방향

❍ 악취발생이 심각한 철원농장을 손실보상을 통해 축사 철거

❍ 단계딸기와 스마트팜을 접목한 복합단지 조성

❍ 귀농․귀촌인의 안전한 영농을 위한 자립성 확보

❍ 외국인 근로자 숙소 건립으로 안정적인 농촌 인력 확보

사업개요

❍ 위    치: 산청군 신등면 모례리 95번지 일원

❍ 사업기간: 2022 ~ 2026년(5년간)

❍ 사 업 비: 금29,400백만원(국비 19,200, 도비 3,060, 군비 7,140)

❍ 사업내용: 스마트팜단지, 스마트팜 복합센터, 귀농․귀촌임대주택,

외국인근로자 숙소 등

추진계획

❍ 기본계획 수립                             : 2022.  1~12월

❍ 공공건축 심의 및 사전검토                 : 2022. 10~12월

❍ 시행계획수립                              : 2023.  1~10월

❍ 감정평가 및 손실보상                      : 2023. 10월

❍ 공사착수 및 준공                          : 2024. 1~2026. 12월

기대효과

❍ 청정환경의 회복과 지역자원의 적극적 활용으로 지역발전 도모

❍ 외국인 근로자 보금자리 제공으로 안정적인 농촌 일자리 확보

❍ 귀농․귀촌인 임대주택 제공으로 안정적인 정착 유도

❍ 스마트 팜단지 조성으로 귀농․귀촌인 딸기재배 기술을 모종부터 3차산업까지 기술을 습득하여 실패없는 귀농서비스 제공과 산청딸기의 브랜드 향상 제고

2. 경호강따라 수계정공원 산책로 설치

❖ 수계정공원은 천혜자원인 경호강과 접하고 있어 수려한 자연경관을 느끼면서

산책할 수 있는 산책로(보행데크) 조성으로 지역주민과 방문객들이

이용할 수 있도록 설치코자 함.

추진방향

❍ 현재 추진중인「2023산청세계전통의약엑스포」개최지와 연결되는

“동의보감 시오리길”과 연결됨으로서 엑스포 개최지의 접근성 향상

❍ 우리군의 랜드마크 공간조성으로 산청군의 이미지 제고

❍ 산책로 정비로 공원 내 위험요소(낙석 등) 제거

사업개요

❍ 위    치: 산청군 산청읍 산청리 25번지 일원

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2022. 6월

❍ 사 업 비: 금840백만원(군비)

❍ 사업내용: 산책로(데크로드) 설치 L=350m

추진계획

❍ 조사측량 및 실시설계용역                        : 2022. 1~2월

❍ 공원조성계획 결정(변경)                          : 2022. 3~4월

❍ 공사착수 및 준공                                : 2022. 5~6월

기대효과

❍ 우리군을 대표하는 공원으로서 공원 활성화에 기여

❍ 지역주민의 이용증가로 건강도모와 산청을 찾는 관광객들에게 볼거리,

즐길거리를 제공함으로써 관광 산청 이미지 제고

❍ 주변 관광 활성화로 지역경제 활성화 도모