상 하 수 도 과

Ⅰ. 기본현황	1

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제	2

Ⅲ. 추진목표와 이행과제	8

Ⅳ. 2022년도 주요업무계획	9

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업	17

Ⅵ. 신규(특수) 시책	40

목    차

Ⅰ. 기 본 현 황

□ 직원현황

(단위: 명)

계	4급	5급	6급	7급	8급	9급	기타
26	-	1	6	6	3	1	9명 (공무직)

□ 분장사무

담 당 명	분 장 사 무
관리담당 (9명)	◦ 상수도특별회계 운영 ◦ 상수원 보호구역 관리 ◦ 지방상수도 급ㆍ배수 및 누수관리 ◦ 상수도 대행업체 및 급수공사 관리 ◦ 상수도 요금 및 급수민원 접수ㆍ처리 ◦ 상하수도 요금부과･징수 및 체납사용료 관리 ◦ 저수조(물탱크) 청소업체 및 저수조 관리 ◦ 절수설비 및 냉ㆍ온수기 관리 ◦ 소규모 수도시설 원･정수 수질관리 ◦ 먹는물 공동시설(약수터) 시설 및 수질관리
상수도담당 (3명)	◦ 수도정비 기본계획 및 중･장기계획 수립 ◦ 상수도시설 확장 및 통ㆍ폐합사업 추진 ◦ 상수도 급수구역 확장사업 추진 ◦ 지방상수도 설치사업 추진 ◦ 노후관 교체사업 추진(누수율 제고사업 포함) ◦ 소규모 수도시설 설치 및 관리
하수도담당 (3명)	◦ 하수도 정비 기본계획 및 중･장기계획 수립 ◦ 공공하수처리시설 설치사업 ◦ 하수관로 정비사업 추진 ◦ 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수처리장 확충사업 추진 ◦ 배수설비설치 신고 및 준공 ◦ 공공하수도 원인자부담금 부과 및 징수 ◦ 배수설비 대행업체 지정 및 승인 ◦ 단독정화조 설치신고 ◦ 오수처리시설 설치신고(변경) 및 준공검사 ◦ 오수,정화조 청소 고지 및 과태료 부과 ◦ 오수처리시설 지도단속
시설운영담당 (7명)	◦ 지방상수도 취ㆍ정수장 운영 관리 ◦ 지방상수도 취ㆍ정수장 개선사업 ◦ 하수도, 분뇨 및 가축분뇨 관리대행업체 관리 ◦ 공공하수처리시설 운영 관리 ◦ 공공하수처리시설 개선사업(일반진단,악취진단,기타) ◦ 분뇨 및 가축분뇨처리시설, 운영관리 ◦ 분뇨 및 가축분뇨처리시설 개선사업(일반진단,악취진단,기타) ◦ 시설물 안전점검(시특법 정기, 정밀점검)
수질개선담당 (4명)	◦ 수질개선 특별회계운영 ◦ 주민지원사업 추진 ◦ 낙동강수계기금 관련업무 ◦ 진양호 상수원보호구역 및 수변구역 관련업무 ◦ 지하수개발이용신고·허가 관리 및 수질측정망 운영 ◦ 친환경샛강살리기 조성사업

Ⅱ. 지난 1년간 성과와 과제

1. 주요성과

안정적인 수돗물 공급을 위한 기반 조성 및 유지관리

❍ 지방상수도 시설 확장 및 정비: 7건 17,968백만원

- 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업: 2,900백만원

- 산청급수구역 지방상수도 확장사업: 5,000백만원

- 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구): 3,086백만원

- 노후상수관망 정비사업(지방상수도 현대화사업): 4,879백만원

- 시천급수구역 지방상수도 확장사업: 500백만원

- 단성급수구역 비상공급망 구축사업: 1,500백만원

- 산청·생초통합정수장 진입도로 수해복구사업: 103백만원

❍ 소규모 수도시설 개보수 및 정비: 2건 2,822백만원

- 소규모 수도 노후화 시설 개량 사업: 857백만원

- 마을상수도, 소규모 급수시설 유지관리 및 개보수: 1,965백만원

2021년 상・하수도분야 국도비 예산 확보: 12건(19,418.5백만원)

❍ 단성정수장 증설: 19,360백만원(국비 3,700, 도비 11,748, 군비 3,912)

- 2021년도: 2,900백만원(도비 2,465, 군비 435)

❍ 산청급수구역 확장: 10,875백만원(국비 2,000, 기금700, 도비 5,750, 군비 2,425)

- 2021년도: 5,000백만원(도비 4,250, 군비 750)

❍ 삼장지구(2지구) 확장: 9,736백만원 (국비 890, 도비 6,810, 군비 2,036)

- 2021년도: 3,086백만원(도비 2,623, 군비 463)

❍ 노후상수관망 정비: 25,098백만원(국비 12,549, 도비 159, 군비 12,390)

- 2021년도: 4,879백만원(국비 2,440, 군비 2,439)

❍ 시천급수구역 확장: 10,000백만원(도비 8,500, 군비 1,500)

- 2021년도: 500백만원 (도비 425, 군비 75)

❍ 단성비상공급망 구축: 8,800백만원(국비 6,160, 군비 2,640)

- 2021년도: 1,500백만원(국비 1,050, 군비 450)

❍ 소규모수도시설 개량: 32,174백만원(국비 11,328, 도비 8,528, 군비 12,318)

- 2021년도: 857백만원(도비 600, 군비 257)

❍ 모고지구 하수관로 정비사업: 7,126백만원(국비 4,833, 군비 799, 기금 1,494)

- 2021년도: 4,443백만원 (국비 3,833, 군비 140.5, 기금 469.5)

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업: 4,511.9백만원 (국비 3,184.9, 도비265, 군비265, 기금 797)

- 2021년도 : 847백만원 (국비 593, 도비127, 군비127)

❍ 석대 공공하수처리시설 신설사업: 12,652백만원 (국비 8,857, 도비 759, 군비 759, 기금 2,277)

- 2021년도: 1,752백만원(국비 500, 도비 107, 군비 416.2, 기금 728.8)

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업: 2,436백만원 (국비 1,705, 도비 146, 군비 146, 기금 439)

- 2021년도: 240백만원(국비 100, 군비 12, 기금 128)

❍ 노은지구 공공하수도 증설사업: 5,465백만원 (국비 3,826, 도비328, 군비328, 기금 983)

- 2021년도: 370백만원(국비 241, 도비 64.5, 군비 64.5)

생활하수 수질개선을 위한 하수처리 기반 확충 및 유지관리

❍ 하수관로정비사업: 1건 7,126백만원

- 모고지구 하수관로 정비사업: 7,126백만원(국비: 4,833, 지방비: 2,293)

❍ 농어촌마을하수도정비사업: 2건 14,111.9백만원

- 신천지구 공공하수도 설치공사: 9,600백만원(국비 5,624, 지방비: 3,976)

- 상법지구 공공하수도 정비사업: 4,511.9백만원(국비: 3,184.9, 지방비: 1,327)

❍ 하수처리장확충사업: 2건 15,088백만원

- 석대 공공하수처리시설 신설사업  12,652백만원(국비: 8,856, 지방비: 3,796)

- 시천 공공하수처리시설 증설사업: 2,436백만원(국비: 1,705, 지방비: 731)

❍ 면단위 공공하수처리시설설치사업: 1건 5,465백만원

- 노은지구 공공하수도 증설사업: 5,465백만원(국비 3,826, 지방비: 1,639)

❍ 소규모 하수처리시설 정비 및 유지관리: 7건 4,447백만원

- 신천지구 공공하수관로 설치공사: 1,683백만원

- 소남마을 하수관로 설치공사: 1,340백만원

- 단성면 성내지구 하수관로 교체공사: 51백만원

- 신안단성 공공하수처리장 진입도로 정비공사: 256백만원

- 신안보건소 주변 하수관로 설치공사: 120백만원

- 하수관로 수선유지 및 긴급보수: 200백만원

- 공공하수도 기술진단 및 개선사업: 797백만원

2022년 상·하수도분야 국도비 예산 확보 계획 : 17건(23,076백만원)

❍ 삼장지구(2지구) 확장: 9,736백만원 국비 890, 도비 6,810, 군비 2,036)

- 2022년도: 2,808백만원 (국비 1,965 도비 422, 군비 421)

❍ 산청급수구역 확장: 10,875백만원(국비 2,000, 기금700, 도비 5,750, 군비 2,425)

- 2022년도: 875백만원(기금 700, 군비 175)

❍ 단성정수장 증설: 19,360백만원(국비 3,700, 도비 11,748, 군비 3,912)

- 2022년도: 5,715백만원(국비 4,000 도비 858, 군비 857)

❍ 시천급수구역 확장: 10,000백만원 (도비 8,500, 군비 1,500)

- 2022년도: 1,429백만원(국비 1,000 도비 215, 군비 214)

❍ 단성비상공급망 구축: 8,800백만원(국비 6,160, 군비 2,640)

- 2022년도: 3,800백만원(도비 2,660, 군비 1,140)

❍ 산청·생초정수장 증설: 24,400백만원(도비 20,740, 군비 3,660)

- 2022년도: 1,000백만원(국비 700 도비 150, 군비 150)

❍ 스마트관망 인프라구축사업: 3,889백만원(국비 2,722, 군비 1,167)

- 2022년도: 3,889백만원(국비 2,722, 군비 1,167)

❍ 소규모수도시설 개량: 32,174백만원(국비 11,328, 도비 8,528, 군비 12,318)

- 2022년도: 1,000백만원(도비 700, 군비 300)

❍ 모고지구: 7,126백만원(국비 4,833, 군비 799, 기금 1,494)

- 2022년도: 749.5백만원(군비 94.5, 기금 655)

❍ 상법지구: 4,511.9백만원(국비 3,184.9, 도비 265, 군비 265, 기금 797)

- 2022년도: 1,077백만원(국비 305, 도비 26, 군비 26, 기금 720)

❍ 석대지구: 12,652백만원(국비 8,857, 도비 759, 군비 759, 기금 2,277)

- 2022년도: 4,505백만원(국비 3,721, 도비 296, 군비 296, 기금 192)

❍ 시천지구: 2,436백만원(국비 1,705, 도비 146, 군비 146, 기금 439)

- 2022년도: 286백만원(국비 195, 도비 17, 군비 17, 기금 57)

❍ 노은지구: 5,465백만원(국비: 3,826, 도비 328, 군비 328, 기금 983)

- 2022년도: 960백만원(국비 794, 도비 38, 군비 38, 기금 90)

❍ 석대지구(관로): 13,411백만원(국비: 9,388, 군비 2,817, 기금 1,206)

- 2022년도: 615백만원(국비 500, 군비 115)

❍ 덕교지구: 13,565백만원(국비: 9,496, 도비 814, 군비 814, 기금 2,441)

- 2022년도: 428백만원(국비 300, 도비 64, 군비 64)

❍ 대포지구: 7,372백만원(국비: 5,160, 도비 442, 군비 442, 기금 1,328)

- 2022년도: 428백만원(국비 300, 도비 64, 군비 64)

❍ 월평지구: 6,480백만원(국비: 4,536, 도비 389, 군비 389, 기금 1,166)

- 2022년도: 428백만원(국비 300, 도비 64, 군비 64)

안심하고 마실 수 있는 물공급 추진

❍ 노후 계량기 신설 및 교체공사: 110백만원

❍ 원·정수 수질검사(지방상수도, 소규모 수도시설): 297백만원

❍ 지방상수도 침전지 및 배수지 청소: 50백만원

낙동강수계 주민지원사업 추진

❍ 소득증대사업: 18건, 169백만원

❍ 복지증진사업: 53건, 553백만원

❍ 오염물질정화사업: 3건, 15백만원

❍ 직접지원사업: 813명, 366백만원

❍ 특별지원사업: 1건, 875백만원

친환경 샛강 살리기 사업 추진

❍ 군 자체사업 : 전 읍면(차황면 실매리 외 6개소), 51백만원

- 7개소 사업완료(집행액 : 51백만원)

2. 과 제

중장기 발전계획 등 미래수요 적극 대응

❍ 단성급수구역 확장에 따른 급수 수요증가로 취·정수시설 증설 및 비상급수를 위한 대체수원 확보

- 단성, 신안, 생비량, 신등면 급수구역 확장으로 단성정수장 증설

- 가뭄 등 비상 시 안정적인 수돗물 공급을 위한 비상급수망 구축(손항저수지 등)

❍ 시천급수구역 구곡천 계곡수 수량부족으로 비상 대체수원 확보

- 삼장면 장당계곡을 취수시설로 구축하여 비상 대체수원 확보

상수관로 노후화에 대한 대책 마련

❍ 수도시설 노후화에 따른 수질악화, 단수, 누수 등 주민 피해 급증

❍ 재정상 문제로 관로 개량사업이 지연되어 노후화 누적 및 가속

❍ 수도서비스 질 저하 및 주민 기초 생활권 위협

⇒ 상수도 관련 주민 요구 및 여론을 반영한 정책사업 수립과 노후 관로 개선사업 신규 발굴 및 국・도비 예산 확보 추진

❍ 스마트 관망 인프라 구축사업 추진

⇒ 수돗물 공급과정에  ICT 기술을 도입하여 수질, 수량을 실시간으로 감시하고 제어해 수돗물 사고를 사전에 방지하고, 사고발생 시 신속히 대응하여 수돗물에 대한 신뢰성 제고

급수지역 확대 및 공기 단축으로 주민불편 해소

❍ 기존 마을상수도 및 소규모 급수시설 지역에 지방상수도 시설을 확장하여 안정적인 맑은 물 공급

- 산청급수구역(오부지구, 생초지구, 금서지구), 시천급수구역(삼장지구) 등 지방상수도 확장 조기 완공 추진.

- 단성정수장 증설 조기 완공으로 단성급수구역(단성, 신안, 생비량지구) 지방상수도 조기 공급

하수도 시설확충 및 보급률 향상

❍ 2022년 국・도비 사업 확정에 따른 모고・상법・석대・시천・노은, 공공하수도 정비사업 조기 추진 및 완공하고 신규지구(덕교, 대포, 월평), 석대지구 공공하수도 정비사업을 설계 완료하고, 조기 완공 계획을 목표로 함.

❍ 공공하수처리구역 확대 및 하수도 보급률 향상

Ⅲ. 추진목표 및 이행과제

	목 표
양질의 물 공급과 깨끗한 수환경 조성으로 행복산청 실현

⇑

	5대 역점시책
안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상 유수율 제고를 위한 관망정비로 안정적 수돗물 공급 안정적인 하수처리로 수자원 보전과 쾌적한 환경 조성 수도시설 효율적 관리로 수도행정 신뢰도 제고 선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성

⇑

	역점시책별 이행과제
안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상 ◦ 지방상수도 급수구역 확장 및 정수장 증설 사업 추진 ◦ 지방상수도 개선 및 정비사업 지속 추진 유수율 제고를 위한 관망정비로 안정적 수돗물 공급 ◦ 노후관망 정비 및 시설 현대화를 통한 안정적인 수도공급 ◦ 소규모 수도시설 개량사업 추진 안정적인 하수처리로 수질자원 보전과 쾌적한 환경 조성 ◦ 공공하수처리시설 확충(증설) 및 농촌마을 하수도 정비사업 추진 ◦ 하수도 시설물 정비 및 유지관리 추진 수도시설 효율적 관리로 수도행정 신뢰도 제고 ◦ 안심하고 마실수 있는 수돗물 생산공급 ◦ 스마트관망 정비사업 선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성 ◦ 낙동강수계 주민지원사업 추진 ◦ 산청군 지하수 관리계획 수립 ◦ 산청군 보조지하수관측망 설치 및 운영

Ⅳ. 2022년도 주요업무계획

양질의 물  공급과 깨끗한 수환경

조성으로 행복산청 실현

안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상

유수율 제고를 위한 관망정비로 안정적 수돗물 공급

안정적인 하수처리로 수질자원 보전과 쾌적한 환경 조성

수도시설 효율적 관리로 수도행정 신뢰도 제고

선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성

역점시책

1. 안정적인 수돗물 공급으로 군민의 삶의 질 향상

역점

시책

지방상수도 급수구역 확장 및 증설사업 추진

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(기투자 6,928, 22년이후 -)

: 총사업비 10,900백만원(1지구 1,164 , 2지구 9,736)

- 2022년 사업비: 2,808백만원(국비 1,965 도비 422, 군비 421)

- 사업위치: 산청군 삼장면 일원

- 사업내용: 배수지300톤, 관로 29.7km, 가압장 2개소, 취수장 1개소 등

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장사업

: 총사업비 10,875백만원(국비 2,000, 기금700, 도비 5,750, 군비 2,425)

※ 2022년 사업비: 875백만원(기금 700, 군비 175)

- 사업위치: 산청군 오부면, 생초면, 금서면 일원

- 사업내용: 배수지 200톤, 관로 49.0km, 가압장 5개소 등

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

: 총사업비 19,360백만원(기투자 9,615, 22년이후 -)

- 2022년도 사업비: 5,715백만원 (국비 4,000 도비 858, 군비 857)

- 사업내용: 정수장 증설 1,600톤/일, 관로매설 62.0km, 가압장 1식 등

❍ 단성급수구역 비상공급망 구축사업

: 총사업비 8,800백만원(기투자 1,500, 22년이후 3,500)

- 2022년도 사업비: 3,800백만원(국비 2,660, 군비 1,140)

- 사업내용: 취수시설(Q=4,100톤/일) 1개소, 도수관로 L=20km 등

❍ 시천급수구역 지방상수도 확장사업

: 총사업비 10,000백만원(기투자 500, 22년이후 8,071)

- 2022년도 사업비: 1,429백만원(국비 1,000 도비 215, 군비 214)

- 사업내용: 정수장 증설 1,500톤/일, 관로매설 40km 등

❍ 산청・생초 통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

: 총사업비 24,400백만원(기투자 -, 22년이후 23,400)

- 2022년도 사업비: 1,000백만원(국비 700 도비 150, 군비 150)

- 사업내용: 정수장 증설 4,000톤/일, 산청・생초・금서지구 관로매설 22.0km 등

지방상수도 개선 및 정비사업

❍ 지방상수도 인입 및 개선사업(도로부서 병행)

- 사 업 비: 1,400백만원(군비 1,400)

- 사업내용: 도로 및 하수도 사업장 상수도관 통합시공

지방상수도 미보급지역 확장 등

2. 유수율 제고를 위한 관망정비로 안정적 수돗물 공급

역점

시책

노후관망 정비 및 시설 현대화를 통한 안정적인 수도공급   ❍ 총사업비 25,097백만원(국비 12,549, 도비 158, 군비 12,390)

※ 2021년도 사업비: 4,879백만원(국비 2,439, 군비 2,440)

❍ 사업내용

- 관망정비 36.1km

- 누수탐사 및 정비 557km

- 블록시스템, 유지관리 시스템 구축

- 유수율 85% 유지

소규모 수도시설 개량사업 추진

❍ 소규모 수도시설 개량사업 :

- 사 업 비: 1,000백만원(국비 700, 군비 300)

- 사업내용: 노후관로교체(누수복구), 시설물 개량(관정, 물탱크 등)

❍ 소규모 수도시설 개보수 및 유지관리:

- 사 업 비: 1,965백만원(군비 1,965)

- 사업내용

· 11개 읍・면 상수도 개보수사업 17개소

· 지하수영향조사 및 지하수 사후관리 용역 24개소

· 긴급보수공사 11개 읍・면

· 소방용수시설 관리 등

3. 안정적인하수처리로 수질보전과 쾌적한 환경 조성

역점

시책

공공 하수처리시설 확충 및 정비

❍ 모고지구 하수관로 정비사업(기투자 6,007, 2022년이후 1,119)

- 총사업비 7,126백만원 (국비 4,833, 군비 799, 기금 1,494)

- 2022년도: 749.5백만원 (군비 94.5, 기금 655)

- 사업내용: 하수관로 L=8.4km, 배수설비 287가구, 맨홀펌프장 6개소

❍ 상법지구 공공하수도 정비사업(기투자 1,161, 2022년이후 3,350.9)

- 총사업비 4,511.9백만원 (국비 3,184.9, 도비 265, 군비 265, 기금 797)

- 2022년도: 1,077백만원 (국비 305, 도비 26, 군비 26, 기금 720)

- 사업내용: 하수처리장 70㎥/일, 하수관로 L=3.9km, 배수설비 145가구

❍ 석대 공공하수처리시설 신설사업(기투자 2,466, 2022년이후 10,186)

- 총사업비 12,652백만원(국비 8,857, 도비 759, 군비 759, 기금 2,277)

- 2022년도: 4,505백만원 (국비 3,721, 도비 296, 군비 296, 기금 192)

- 사업내용: 하수처리장 1,200㎥/일, 하수관로 L=14.5km

❍ 시천 공공하수처리시설 증설사업(기투자 669, 2022년이후 1,767)

- 총사업비 2,436백만원 (국비 1,705, 도비 146, 군비 146, 기금 439)

- 2022년도: 286백만원(국비 195, 도비 17, 군비 17, 기금 57)

- 사업내용: 하수처리장 증설 600㎥/일 → 850㎥/일 (250㎥/일 증설)

❍ 노은지구 공공하수도 증설사업(기투자 370, 2022년이후 5,095)

- 총사업비 5,465백만원(국비 3,826, 도비 328, 군비 328, 기금 983)

- 2022년도: 960백만원(국비 794, 도비 38, 군비 38, 기금 90)

- 사업내용: 하수처리장 증설 30톤/일→80톤/일 (50톤/일 증설)

❍ 석대지구 공공하수관로 설치사업(기투자 0, 2022년이후 13,411)

- 총사업비 13,411백만원(국비 9,388, 군비 2,817, 기금 1,206)

- 2022년도: 615백만원 (국비 500, 군비 115)

- 사업내용: 하수관로 L=14.5km, 배수설비 351가구, 맨홀펌프장 3개소

❍ 덕교지구 농어촌마을하수도 증설사업(기투자 0, 2022년이후 13,565)

- 총사업비 13,565백만원 (국비 9,496, 도비 814, 군비 814, 기금 2,441)

- 2022년도: 428백만원 (국비 300, 도비 64, 군비 64)

- 사업내용: 하수처리시설 증설(덕교 Q=150㎥/일)

오수관로 신설(L=11,691m) 펌프장 9개소, 배수설비 384가구

❍ 대포지구 농어촌마을하수도 증설사업(기투자 0, 2022년이후 7,372)

- 총사업비 7,372백만원 (국비 5,160, 도비 442, 군비 442, 기금 1,328)

- 2022년도: 428백만원 (국비 300, 도비 64, 군비 64)

- 사업내용: 하수처리시설 증설(대포 Q=80㎥/일)

오수관로 신설(L=7,456m) 펌프장 5개소, 배수설비 156가구

❍ 월평지구 농어촌마을하수도 정비사업(기투자 0, 2022년이후 6,480)

- 총사업비 6,480백만원 (국비 4,536, 도비 389, 군비 389, 기금 1,166)

- 2022년도: 428백만원 (국비 300, 도비 64, 군비 64)

- 사업내용: 하수처리시설 증설(월평 Q=80㎥/일)

오수관로 신설(L=6,182m) 펌프장 5개소, 배수설비 196가구

하수관로 정비 및 유지관리: 3건 2,299백만원

❍ 모고지구 공공하수관로 설치공사(1차분): 1,499백만원(군비 1,499)

❍ 하수관로 기술진단 및 개선사업: 500백만원(군비 500)

❍ 하수관로 수선유지 및 긴급보수: 300백만원(군비 300)

4. 수도시설 효율적 관리로 수도행정 신뢰도 제고

역점

시책

안심하고 마실 수 있는 수돗물 생산·공급

❍ 지방상수도 및 소규모 수도시설 원·정수 수질검사: 260백만원

❍ 지방상수도 시설물 내부청소: 60백만원

❍ 노후 계량기 신설 및 교체공사: 120백만원

❍ 취‧배수 유량계 검교정: 10백만원

스마트 관망관리 인프라 구축사업 추진

❍ 총사업비 3,889백만원(국비 2,722, 군비 1,167)

- 2022년도 사업비: 3,889백만원(국비 2,722, 군비 1,167)

- 사업내용: 산청군 지방상수도 급수지역 10개 분야 정비(실시간수압계, 관리인식체계, 워터코디, 소규모유량수압감시, 스마트미터링, 수질계측기, 자동드레인, 재염소투입설비, 관세척, 정밀여과 등)

5. 선제적 수자원관리로 깨끗한 물환경 조성

역점

시책

낙동강수계 주민지원사업 추진

❍ 사 업 비: 865백만원

❍ 지원대상: 5개읍‧면(산청, 금서, 시천, 단성, 신안)

❍ 사업내용

- 일반지원사업

·직접지원사업: 재산규모에 따른 가구별 지원사업

·간접지원사업: 소득증대사업, 복지증진사업 등

❍ 낙동강수계관리위원회 사업계획 확정: 2021. 12월

산청군 보조지하수관측망 설치 및 운영

❍ 사 업 명: 2022년 산청군 보조지하수관측망 설치 및 운영 사업

❍ 위    치: 산청군 전역(지하수 장해우려지역 우선 설치)

❍ 사 업 비: 금145,000,000원

❍ 사 업 량: 관측정 신규설치 4공, 관측망 운영 9공

❍ 사업기간: 2022. 1 ∼ 2022. 12월

❍ 사업내용

- 지하수 장해우려지역 선정 및 분석(샘물공장과 주변마을사이 설치하여 지하수고갈 및 수질오염여부 상시관측)

- 관측정 설치·운영(지하수 장해우려 시 대책수립 등)

Ⅴ. 주요 현안사업 및 공약사업

산청·생초통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

스마트 관망관리 인프라 구축사업

단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

삼장지구 지방상수도 인입공사

□ 산청급수구역 지방상수도 확장사업

□ 단성급수구역 비상공급망 구축사업

시천급수구역 지방상수도 확장사업

□ 석대지구 공공하수관로 설치사업

□ 덕교지구 농어촌마을하수도 증설사업

대포지구 농어촌마을하수도 증설사업

월평지구 농어촌마을하수도 증설사업

석대 공공하수처리시설 신설사업

시천 공공하수처리시설 증설사업

노은지구 공공하수도 증설사업

안정적인 하수처리로 쾌적한 생활환경 조성

분뇨 및 가축분뇨 공공처리로 깨끗한 수환경 조성

낙동강수계 주민지원사업 추진

지방상수도 수혜지역 확장(공약)

모고지구 하수관로 정비사업(공약)

상법지구 공공하수도 정비사업(공약)

생비량지구 지방상수도 인입공사 조기마무리(공약)

노후 상수관망 정비사업(시책)

1. 산청·생초통합정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

❖ 소규모수도시설의 한계로 상수도 이용에 어려움을 겪고 있는 마을에 수도정비기본계획에 따른 지방상수도 공급으로 지역주민들에게 안정적이고, 깨끗한 상수도를 공급하고자 함.

추진방향

❍ 산청·생초통합정수장 증설로 지방상수도 급수구역 확장

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치: 산청군 생초면 일원

❍ 사 업 량

- 정수장 증설 Q=4,000톤/일

- 산청・금서・생초 지구관로매설 L=22km 등

❍ 사 업 비: 1,000백만원 (국비700 도비 150, 군비 150)

※ 총사업비 24,400백만원 (국비 17,080 도비 3,660, 군비 3,660)

❍ 사업내용: 실시설계 등

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2025. 12월

추진계획

❍ 사업확정 및 예산내시                             : 2021. 11월

❍ 실시설계용역 착수                                : 2022.  3월

❍ 실시설계용역 완료                                : 2023.  3월

❍ 산청·생초정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 착공 : 2023.  4월

❍ 산청·생초정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 준공 : 2025. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

2. 스마트 관망관리 인프라 구축사업

❖ 수돗물 공급의 전 과정에  ICT 기술을 접목하여 물 공급과정에 대한 신뢰도 향상을 위한 상수관망 관리 시스템 구축

추진방향

❍ 인천 적수사고에 따른 재발방지를 위해 감시체계 구축

❍ 사고 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 인프라 구축

사업개요

❍ 위    치: 산청군 일원

❍ 사 업 량: 산청군 지방상수도 급수지역 10개 분야 정비(실시간수압계, 관리인식체계, 워터코디, 소규모유량수압감시, 스마트미터링, 수질계측기, 자동드레인, 재염소투입설비, 관세척, 정밀여과 등)

❍ 사 업 비: 3,889백만원(국비 2,722, 군비 1,167)

※ 총사업비 3,889백만원(국비 2,722, 군비 1,167)

❍ 사업내용: 산청군 지방상수도 급수지역 10개 분야 정비

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2023. 12월

그간 추진사항

❍ 기본계획에 대한 의견 제출                        : 2021.  2월

❍ 기본계획 확정                                    : 2021.  6월

추진계획

❍ K-WATER 위·수탁 협약체결                      : 2022.  1월

❍ 스마트 관망관리 구축사업 실시설계 착공           : 2022.  1월

❍ 스마트 관망관리 구축사업 착공                    : 2022.  4월

❍ 스마트 관망관리 구축사업 준공                    : 2023. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

3. 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

❖ 산청군 수도정비기본계획(변경)에 따라 지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도를 공급하고, 단성정수장 증설사업을 병행 추진하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 단성정수장 증설로 지방상수도 급수구역 확장

❍ 조기 준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치: 산청군 단성면, 신안면, 신등면 일원

❍ 사 업 량: 정수장 증설 Q=1,600톤/일(4,100톤/일→5,700톤/일),

관로매설 L=62km, 가압장 1식 등

❍ 사 업 비: 5,715백만원 (국비 4,000 도비 858, 군비 857)

※ 총사업비 19,360백만원 (국비 13,552, 도비 1,897, 군비 3,912)

❍ 사업내용: 정수장 증설 Q=1,600톤/일, 관로매설 L=62km, 가압장 1식

❍ 사업기간: 2017. 1 ~ 2022. 12월

그간 추진사항

❍ 기본 및 실시설계 용역 착공                   : 2017.  5월

❍ 기본 및 실시설계 용역 준공                   : 2019. 10월

❍ 단성정수장 증설 공사 착공                    : 2020.  6월

❍ 단성정수장 증설 공사(2차분) 착공              : 2021.  3월

❍ 단성정수장 증설 공사(1차분) 준공              : 2021.  9월

추진계획

❍ 단성정수장 증설 공사(3차분) 착공              : 2022.  1월

❍ 단성정수장 증설 공사 준공                    : 2022.  6월

❍ 지방상수도 확장 공사 착공                    : 2022. 4월 이후

❍ 지방상수도 확장 공사 준공                    : 2022. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

4. 삼장지구 지방상수도 인입공사

❖ 삼장면 일원은 원수 부족 및 수질 악화 등의 문제로 소규모 수도시설에 이용에 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치: 산청군 삼장면 일원

❍ 사 업 량: 배수지 300톤, 가압장 2개소, 관로매설 29.7km 등

❍ 사 업 비: 2,808백만원 (국비 1,965 도비 422, 군비 421)

※ 총사업비: 10,900백만원(국비 7,629, 도비 885, 군비 2,386)

※ 삼장1지구(동신~대포) 1,164백만원, 삼장2지구(후천~홍계) 9,736백만원

❍ 사업내용: 배수지 300ton, 관로매설 29.7km 등

❍ 사업기간: 2016. 1 ~ 2023. 3월

그간 추진사항

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(1지구)    : 2017. 12 ~ 2018. 11월

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구) 총사업비 변경  : 2019. 10월

※ 당초 5,700백만원 → 변경 9,736백만원

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구) 설계 용역 준공 : 2019. 12월

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구) 착공          : 2020. 2월

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구)(1차분) 준공    : 2021. 4월

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구)(2차분) 착공    : 2021. 4월

추진계획

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구)(3차분) 착공    : 2022. 3월

❍ 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구) 준공          : 2023. 3월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민 편익 증진 및 복지 증진

5. 산청급수구역 지방상수도 확장사업

❖ 산청・생초 통합 정수장 증설 사업이 완료됨에 따라 지방상수도 미공급 마을에 수도정비기본계획에 따른 지방상수도 확장사업으로 지역주민들에게 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치: 산청군 오부면, 금서면, 생초면 일원

❍ 사 업 량: 배수지 200ton, 관로매설 L=49km, 가압장 5개소 등

❍ 사 업 비: 875백만원(기금 700, 군비 175)

※ 총사업비: 10,875백만원(국비 2,000, 기금 700, 도비 5,750, 군비 2,425)

❍ 사업내용: 배수지 200ton, 관로매설 L=23.7km, 가압장 5개소

❍ 사업기간: 2017. 1 ~ 2022. 12월

그간 추진사항

❍ 기본 및 실시설계 용역 착공                   : 2017.  5월

❍ 기본 및 실시설계 용역 준공                   : 2019. 10월

❍ 산청급수구역(오부지구) 착공                   : 2020.  3월

❍ 산청급수구역(금서지구) 착공                   : 2020.  9월

❍ 산청급수구역(오부지구)(1차분) 준공            : 2021.  2월

❍ 산청급수구역(오부지구)(2차분) 착공            : 2021.  3월

❍ 산청급수구역(금서지구)(2차분) 착공             : 2021.  4월

추진계획

❍ 산청급수구역(생초) 착공예정                   : 2022. 4월 이후

❍ 산청급수구역 지방상수도 확장 준공            : 2022. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

6. 단성급수구역 비상공급망 구축

❖ 단성급수구역 취수시설에 가뭄 및 비상상황에 대비하여 손항저수지 수원을 비상공급망으로 구축하여 안정적인 수원 공급하고자 함.

추진방향

❍ 단성급수구역의 안정적이며, 영구적인 맑은 물 공급

사업개요

❍ 위    치: 산청군 신등면 장천리 외 2개리 일원

❍ 사 업 량: 취수시설(Q=4,100톤/일) 1개소, 도수관로 (ɸ300mm) L=20km

❍ 사 업 비: 3,800백만원(국비 2,660, 군비 1,140)

※ 총사업비: 8,800백만원(국비 6,160, 군비 2,640)

❍ 사업내용: 취수시설(Q=4,100톤/일) 1개소, 도수관로 (ɸ300mm) L=20km

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 2023. 12월

그간 추진사항

❍ 한국농어촌공사 수자원활용에 관한 업무 협약       : 2019.  1월

❍ 비상공급망구축 사업 선정                         : 2020.  4월

❍ 비상공급망구축 조사측량 및 실시설계 용역 시행    : 2021.  3월

추진계획

❍ 비상공급망구축 공사 착공                         : 2022.  3월

❍ 비상공급망구축 공사 준공                         : 2023. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지증진

7. 시천급수구역 지방상수도 확장사업

❖ 소규모수도시설의 한계로 상수도 이용에 어려움을 겪고 있는 마을에 수도정비기본계획에 따른 지방상수도 공급으로 지역주민들에게 안정적이고, 깨끗한 상수도를 공급하고자 함.

추진방향

❍ 지방상수도 급수구역 확장으로 상수도 보급률 향상

❍ 조기준공 및 공급시기 단축으로 안정적인 수돗물 공급

사업개요

❍ 위    치: 산청군 시천면 일원

❍ 사 업 량: 정수장 증설 Q=1,500톤/일, 관로 L=40km 등

❍ 사 업 비: 1,429백만원 (국비 1,000 도비 215, 군비 214)

※ 총사업비 10,000백만원 (국비 7,000 도비 1,500, 군비 1,500)

❍ 사업내용: 정수장 증설 Q=1,500톤/일

❍ 사업기간: 2021. 1 ~ 2024. 12월

그간 추진사항

❍ 사업확정 및 예산내시                             : 2020. 12월

❍ 실시설계용역 착수                                : 2021.  5월

추진계획

❍ 시천급수구역 지방상수도 확장공사 착공            : 2022.  4월

❍ 시천급수구역 지방상수도 확장공사 준공            : 2024. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

8. 석대지구 공공하수관로 설치사업

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역 사회의 건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청군 단성면 방목리 일원

❍ 사 업 량: 하수관로 14,582m, 배수설비 351가구, 맨홀펌프장 3개소

❍ 사 업 비: 금13,411백만원(국비 9,388, 군비 2,817, 기금 1,206)

※ 2022년예산: 금615백만원(국비 500, 군비 115)

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2024. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                             : 2019.  3월

❍ 하수도 기본계획 부분변경 착수                    : 2021.  3월

추진계획

❍ 재원협의 및 경남도 계약심사                      : 2022.  1월

❍ 공사 착공                                        : 2022.  3월

❍ 공사 준공                                        : 2023. 12월

기대효과

❍ 석대지구 공공하수관로 설치를 통해 생활오수의 안정적 처리 및 양질의 수자원 확보 등 쾌적한 주거환경 개선

9. 덕교지구 농어촌마을하수도 증설사업

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역 사회의 건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100% 실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청군 삼장면 덕교리 일원

❍ 사 업 량: 하수처리시설 증설(덕교 Q=150㎥/일)

오수관로 신설(L=11,691m), 펌프장 9개소, 배수설비 384가구

❍ 사 업 비: 13,565백만원(국비 9,496, 도비 814, 군비 814, 기금 2,441)

※ 2022년예산: 금428백만원(국비 300, 도비 64, 군비 64)

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2024. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도정비 기본계획 승인                         : 2019. 3월

❍ 하수도정비 기본계획 부분변경 착수                : 2021. 3월

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                                : 2021. 11월

❍ 공사 착공                                        : 2022. 10월

❍ 공사 준공                                        : 2024. 12월

기대효과

❍ 덕교지구 하수도 정비사업을 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

10. 대포지구 농어촌마을하수도 증설사업

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역 사회의 건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청군 삼장면 대포리 일원

❍ 사 업 량: 하수처리시설 증설(대포 Q=80㎥/일),

오수관로 신설(L=7,456m) 펌프장 5개소, 배수설비 156가구

❍ 사 업 비: 7,372백만원(국비 5,160, 도비 442, 군비 442, 기금 1,328)

※ 2022년예산: 금428백만원(국비 300, 도비 64, 군비 64)

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2024. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도정비 기본계획 승인                         : 2019.  3월

❍ 하수도정비 기본계획 부분변경 착수                : 2021.  3월

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                                : 2021. 11월

❍ 공사 착공                                        : 2022. 10월

❍ 공사 준공                                        : 2024. 12월

기대효과

❍ 대포지구 하수도 정비사업을 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

11. 월평지구 농어촌마을하수도 증설사업

농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역 사회의 건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청군 신등면 가술리 일원

❍ 사 업 량: 하수처리시설 증설(월평 Q=80㎥/일)

오수관로 신설(L=6,182m) 펌프장 5개소, 배수설비 196가구

❍ 사 업 비: 6,480백만원(국비 4,536, 도비 389, 군비 389, 기금 1,166)

※ 2022년예산: 금428백만원(국비 300, 도비 64, 군비 64)

❍ 사업기간: 2022. 1 ~ 2024. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도정비 기본계획 승인                         : 2019. 3월

❍ 하수도정비 기본계획 부분변경 착수                : 2021. 3월

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                                : 2021. 11월

❍ 공사 착공                                        : 2022. 10월

❍ 공사 준공                                        : 2024. 12월

기대효과

❍ 월평지구 하수도 정비사업을 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

12. 석대 공공하수처리시설 신설사업

❖ 방목리 수산, 방목, 석대 마을에서 발생하는 생활하수의 미처리 방류에 따른  인근 상수원보호구역과 남강 등 공공수역의 오염이 심각한 바 하수처리시설 설치에 따른 공공수역의 수질오염방지와 도시환경 및 주민보건 위생 개선에 기여하고자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100% 실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청군 단성면 석대리 일원

❍ 사 업 량: 하수처리시설 1,200톤/일, 하수관로 14.5km

❍ 사 업 비: 12,652백만원(국비 8,857, 도비 759, 군비 759, 기금 2,277)

※ 2022년예산: 1,505백만원(국비 1,121, 도비 96, 군비 96, 기금 192)

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2023. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                             : 2019.  3월

❍ 하수도 기본계획 부분변경 착수                    : 2021.  3월

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                                : 2020. 10월

❍ 실시설계용역 준공                                : 2022.  2월

❍ 공사 착공                                        : 2022.  3월

❍ 공사 준공                                        : 2023. 12월

기대효과

❍ 석대 공공하수처리시설 신설사업을 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

13. 시천 공공하수처리시설 증설사업

❖ 하수처리구역 확대 등으로 하수량이 지속적으로 늘어남에 따라 부족한 공공하수처리시설의 용량을 증설하고, 방류수역의 수질오염을 예방하여 주민 보건향상에 기여코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100% 실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청군 시천면 사리 일원

❍ 사 업 량: 하수처리시설 증설 600톤/일→850톤/일 (250톤/일 증설)

❍ 사 업 비: 2,436백만원(국비 1,705, 도비 146, 군비 146, 기금 439)

※ 2022년예산: 금286백만원(국비 195, 도비 17, 군비 17, 기금 57)

❍ 사업기간: 2020. 1 ~ 2023. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                             : 2019.  3월

❍ 하수도 기본계획 부분변경 착수                    : 2021.  3월

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                                : 2020. 10월

❍ 실시설계용역 준공                                : 2022.  2월

❍ 공사 착공                                        : 2022.  3월

❍ 공사 준공                                        : 2023. 12월

기대효과

❍ 부족한 처리용량의 증설을 통해 생활오수의 안정적 처리 및 양질의 수자원 확보 등 쾌적한 주거환경 개선

14. 노은지구 공공하수도 증설사업

❖하수처리구역 확대 등으로 하수량이 지속적으로 늘어남에 따라 부족한 공공하수  처리시설의 용량을 증설 방류수역의 수질오염을 예방하고 주민 보건향상에 기여코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100% 실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청군 생초면 노은리 일원

❍ 사 업 량: 하수처리시설 증설 30톤/일→80톤/일 (50톤/일 증설)

❍ 사 업 비: 5,465백만원(국비 3,826, 도비 328, 군비 328, 기금 983)

※ 2022년예산: 금1,020백만원(국비 794, 도비 68, 군비 68, 기금 90)

❍ 사업기간: 2021. 1. ~ 2023. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                             : 2019.  2월

추진계획

❍ 실시설계용역 착수                                : 2021.  1월

❍ 실시설계용역 준공                                : 2021. 12월

❍ 공사 착공                                        : 2022.  1월

❍ 공사 준공                                        : 2023. 12월

기대효과

❍ 부족한 처리용량의 증설을 통해 생활오수의 안정적 처리 및 양질의 수자원 확보 등 쾌적한 주거환경 개선

15. 안정적인 하수처리로 쾌적한 생활환경 조성

❖ 공공하수 및 소규모 하수처리시설 관리대행을 통하여 전문성 확보

❖ 효율적 하수시설 유지‧관리로 하천 수질보전과 쾌적한 주거환경 조성

추진방향

❍ 효율적인 운영과 안정적인 시설관리로 믿음과 신뢰가 있는 환경기초시설로의 이미지 제고

시설현황

❍ 사 업 량: 산청공공하수처리시설 외 50개소

총 계		500㎥/일이상		500㎥/일미만		비고
개소수	시설용량 (㎥/일)	개소수	시설용량 (㎥/일)	개소수	시설용량 (㎥/일)
51	9,614	3	6,200	48	3,414

❍ 사 업 비: 3,027백만원

❍ 사업내용

- 하수처리시설 관리대행 용역(51개소): 2,047백만원

- 하수처리시설 기술진단 용역(2개소): 20백만원

- 하수슬러지 위탁처리 용역: 300백만원

- 통합관리센터 유지보수 용역: 60백만원

- 하수처리시설 기술진단 개선사업: 600백만원

추진계획

❍ 공공 및 소규모하수처리시설 관리대행 용역     : 2022. 1월 ~ 12월

❍ 하수처리시설 기술진단 용역(2개소)           : 2022. 2월 ~  6월

❍ 하수슬러지 위탁처리 용역                   : 2022. 1월 ~ 12월

❍ 통합관리센터 유지보수 용역                 : 2022. 1월 ~ 12월

❍ 하수처리시설 기술진단 개선사업 추진        : 2022. 2월 ~  6월

기대효과

❍ 노후화된 하수처리시설 개‧보수 사업으로 처리 효율성 증대

❍ 전문기관 관리대행 완벽한 하수처리로 쾌적한 생활환경 조성

16. 분뇨 및 가축분뇨 공공처리로 깨끗한 수환경 조성

❖ 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 관리대행을 통하여 전문성 확보

❖ 처리시설 효율적 유지‧관리로 하천 수질보전과 쾌적한 주거환경 조성

추진방향

❍ 효율적인 운영과 안정적인 시설관리로 믿음과 신뢰가 있는 환경기초시설로의 이미지 제고

시설현황

❍ 사 업 량: 산청가축분뇨공공처리시설외 2개소

(단위 : 개소, ㎥/일)

계		분뇨처리시설		가축분뇨 공공처리시설
개소수	시설용량	개소수	시설용량	개소수	시설용량
3	160	1	30	2	130

❍ 사 업 비: 2,596백만원

❍ 사업내용

- 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 관리대행 용역: 1,961백만원

- 산청 가축분뇨 공공처리시설 악취기술진단: 55백만원

- 슬러지 위탁처리 용역: 500백만원

- 산청 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 기술진단 개선사업: 80백만원

추진계획

❍ 관리대행 용역                                  : 2022. 1 ~ 12월

❍ 기술진단 용역                                : 2022. 2 ~  6월

❍ 슬러지 위탁처리 용역                         : 2022. 1 ~ 12월

❍ 기술진단 개선사업 추진                       : 2022. 1 ~  6월

기대효과

❍ 노후화된 분뇨 및 가축분뇨 처리시설 개‧보수로 처리 효율 증대

❍ 전문기관 관리대행 완벽한 수처리로 쾌적한 생활환경 조성

17. 낙동강수계 주민지원사업 추진

❖ 낙동강수계 상수원관리지역(상수원보호구역, 수변구역) 및 댐주변 지역에서 행위제한을 받고 있는 토지소유자 소득증대 및 생활환경개선을 위함

사업개요

❍ 위    치: 5개 읍·면(산청읍, 금서면, 시천면, 단성면, 신안면)

❍ 사 업 비: 865,000천원

(단위 천원)

일반지원사업
상수원보호구역	수변구역	댐주변지역
60,740	612,563	191,697

❍ 사업내용

- 일반지원사업

·직접지원사업: 재산규모에 따른 가구별 지원사업: 365백만원

·간접지원사업: 소득증대사업, 복지증진사업 등: 500백만원

추진계획

❍ 가구 및 마을별 사업계획수립완료              : 2021. 9월

❍ 직접지원사업

- 대상자 조사 및 확정                         : 2022. 1 ~ 2월

- 사업비 읍·면 재배정                        : 2022. 3월

- 가구별 사업비 집행                          : 2022. 3 ~ 12월

❍ 간접지원사업 시행                            : 2022. 1 ~ 12월

18. 지방상수도 수혜지역 확장(공약)

❖ 상수도가 공급되지 않는 지역에 대하여 지방상수도 시설증설 및 구역확장을 통하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급함으로써 주민주거환경 개선에 기여

추진방향

❍ 수도정비 기본계획(변경) 수립을 통한 지방상수도 공급구역 확장으로 상수도 보급률 향상에 기여

사업개요

❍ 위    치: 산청군 일원

❍ 사 업 량: 산청, 단성, 시천 급수구역 확장 및 시설 증설, 관로 120km 등

❍ 사 업 비: 50,260백만원(국비 7,404, 도비 27,777 군비 15,079)

※ 2022년 예산  15,764백만원(국비 11,034, 도비 2,365, 군비 2,365)

❍ 사업기간: 2018. 1 ~ 2023. 12월

그간 추진사항

❍ 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립 용역 준공 및 승인 : 2019.  2월

❍ 산청 및 단성 급수구역 실시설계용역 준공          : 2019. 10월

❍ 시천 급수구역 확장사업(삼장2지구) 착공            : 2020.  2월

❍ 산청 급수구역 확장사업(오부지구) 착공             : 2020.  3월

❍ 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 착공      : 2020.  6월

❍ 산청 급수구역 확장사업(금서지구) 착공             : 2020.  9월

❍ 오부, 금서, 삼장2지구, 단성정수장 2차분 착공       : 2021.  2월

추진계획

❍ 산청 급수구역 확장사업(생초지구)                  : 2022.  3월

❍ 오부지구, 금서지구, 단성정수장 공사 준공          : 2022.  6월

❍ 산청, 생초 시천, 단성 급수구역 확장사업 준공      : 2023. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익제공 및 복지증진

❍ 지역 간 균등급수 및 생활개선을 통한 지역균형발전 기여

19. 모고지구 하수관로 정비사업(공약)

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역 사회의 건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100% 실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 산청읍 모고리(모고,운곡), 부리(외부,내부), 병정리(병정)

❍ 사 업 량: 하수관로 8.4㎞, 배수설비 287가구, 맨홀펌프장 6개소

❍ 사 업 비: 7,126백만원(국비 4,833, 군비 799, 기금 1,494)

※ 2022년예산: 749.5백만원(군비 94.5, 기금 655)

❍ 사업기간: 2020. 8 ~ 2022. 12월

그간 추진사항

❍ 실시설계용역 착수                                : 2018.  7월

❍ 하수도 기본계획 승인                             : 2019.  2월

❍ 실시설계용역 준공                                : 2019.  6월

❍ 총괄분 및 1차분 공사 착수                        : 2020.  8월

❍ 2차분 공사 착수                                  : 2021.  2월

❍ 3차분 공사 착수                                  : 2021.  9월

추진계획

❍ 공사 준공                                        : 2022. 12월

기대효과

❍ 모고지구 하수관로 설치를 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의 수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

20. 상법지구 공공하수도 정비사업(공약)

❖ 농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정처리하여 지역 사회의 건전한 발전과 공중위생 환경에 기여하고 공공수역의 수질을 보전코자 함.

추진방향

❍ 산청군 공공하수도 100%실현을 위하여 중장기적인 노력 지속

사업개요

❍ 위    치: 차황면 상법리(상법), 법평리(신촌,만암)

❍ 사 업 량: 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 3.9㎞ 배수설비 145가구

❍ 사 업 비: 4,511.9백만원(국비 3,184.9, 도비 265, 군비 265, 기금 797)

※ 2022년예산: 1,077백만원(국비 305, 도비 26, 군비 26, 기금 720)

❍ 사업기간: 2020. 9 ~ 2022. 12월

그간 추진사항

❍ 하수도 기본계획 승인                             : 2019.  3월

❍ 실시설계용역 착수                                : 2018. 11월

❍ 실시설계용역 준공                                : 2019.  6월

❍ 총괄분 및 1차분 공사 착수                        : 2020.  9월

❍ 2차분 공사 착수                                  : 2021.  3월

추진계획

❍ 공사 준공                                        : 2022. 12월

기대효과

❍ 상법지구 하수도 정비사업을 통해 생활오수의 안정적 처리로 양질의

수자원 확보 및 쾌적한 주거환경 개선

21.생비량지구 지방상수도 인입공사 조기 마무리(공약)

❖ 소규모 수도시설에 의존하여 수질불량 및 원수 부족의 어려움을 겪고 있는 생비량지구에 지방상수도를 인입, 안정적이고 깨끗한 상수도 공급으로 주민 불편을 해소코자 함

추진방향

❍ 생비량지구 지방상수도 조기인입으로 안정적인 수돗물 공급과 주민편익 제공

사업개요

❍ 위    치: 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 량: 배수지(300톤/일) 1식, 관로매설 77.1km

가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

❍ 사 업 비: 14,951백만원(국비 9,766, 군비 5,185)

❍ 사업내용: 생비량지구 지방상수도 급수구역 확장

❍ 사업기간: 2015. 1 ~ 2020. 3월

추진사항

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 착공(총괄분)      : 2015. 12월

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사 준공(1,2,3차분)    : 2018. 10월

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사(잔여분) 착공        : 2019. 10월

❍ 생비량지구 지방상수도 시운전 및 공사 준공       : 2020.  3월

❍ 도전리(5개 마을) 지방상수도 공급                 : 2020.  4월

❍ 도리(1개 마을) 지방상수도 공급                   : 2021.  5월

❍ 생비량 전역 지방상수도 공급(계획)                : 2021. 12월

기대효과

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

❍ 지방상수도 확장을 통한 기반시설 인프라 구축 및 인구유입 증대

22. 노후 상수관망 정비사업(시책)

❖ 노후상수관망 정비로 녹물 발생·이물질 유입예방 등 안전한 수돗물을 공급하고 누수 저감을 통한 유수율 제고 및 상수도 운영·관리의 선순환 구조를 구축하고자 함

추진방향

❍ 노후상수관망 정비사업을 통한 유수율(62.6% →85%) 제고

❍ 누수량 감소로 수돗물 생산비용 절감을 통한 경영수지개선

사업개요

❍ 위    치: 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사 업 량: 관망정비 L=36.2km, 누수탐사·정비 L=557km

블록시스템 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 총사업비: 25,098백만원(국비 12,549, 도비 159, 군비 12,390)

※ 2021년도 사업비: 4,879백만원(국비 2,439, 군비 2,440)

❍ 사업내용: 관망정비, 누수탐사‧정비, 블록/유지관리시스템 구축

❍ 사업기간: 2016. 10 ~ 2022. 12월

※ 한국환경공단 일괄위탁 시행

그간 추진사항

❍ 한국환경공단과 위‧수탁 협약 체결                  : 2016. 10월

❍ 기본계획 용역 추진방식(군‧공단 공동관리) 협의      : 2017.  3월

❍ 기본설계 용역 준공                                : 2017.  9월

❍ 블록시스템 구축 실시설계 준공                     : 2018.  3월

❍ 블록시스템 구축 시설공사 준공                    : 2019. 10월

❍ 노후 관망정비 공사 착공                           : 2019. 12월

추진계획

❍ 유지관리시스템 구축 공사 준공	: 2022. 10월

❍ 노후 관망정비 공사 준공	: 2022. 12월

❍ 유수율 성과판정 완료	: 2022. 12월

기대효과

❍ 매년 누수저감 및 수돗물 생산비용 절감

❍ 안정적인 수돗물 공급을 통한 지역주민의 편익 제고 및 복지 증진

Ⅵ. 신규(특수) 시책

성공적인 엑스포를 위한 상하수도 사업추진

상・하수도 및 도로 공사 병행 추진

옥내 급수관 무료누수탐사 서비스

1. 성공적인 엑스포를 위한 상하수도 사업 추진

❖ 주행사장인 동의보감촌 지방상수도 공급 및 하수도 시설의 지속적인 유지

관리를 통해 성공적 2023 산청세계전통의약엑스포 개최를 지원하고자 함.

추진방향

❍ 주행사장인 동의보감촌에 지방상수도 공급을 통해 행사장을 찾을 많은 방문객들에게 안정적이며, 깨끗한 수돗물 공급

❍ 하수도 시설의 지속적인 유지 관리를 통한 원활한 하수도 서비스 제공

사업개요

❍ 위    치: 산청군 금서면 일원

❍ 사 업 량: 금서지구 급수구역 확장, 시설 증설 및 배수관로 9.8km 등

❍ 총사업비: 4,162백만원 (국비 2,914, 도비 624, 군비 624)

※ 2022년도 사업비: 2,200백만원(국비 1,540, 도비 330, 군비 330)

❍ 사업내용: 금서면 급수구역 확장 및 하수도관망 유지 보수

❍ 사업기간: 2020. 9 ~ 2023. 1월

그간 추진사항

❍ 금서지구 지방상수도 확장사업 시행(2차분)          : 2021. 4월

❍ 산청공공하수처리구역 기술진단 완료               : 2021. 11월

추진계획

❍ 엑스포 개최지 내 상수 배관 정비                  : 2022. 1월

❍ 엑스포 개최지 내 하수도 시설 관리                : 2022. 1월~

❍ 엑스포 개최지 내 지방상수도 공급 및 관리         : 2022. 2월~

❍ 산청공공하수처리구역 기술진단 개선공사착수       : 2022. 2월

❍ 금서지구 지방상수도 확장사업 준공                : 2022. 12월

기대효과

❍ 안정적인 지방상수도 공급 및 하수도 관망 유지를 통해 액스포를

찾을 방문객에게 쾌적한 관람 환경 제공

❍ 안정적인 수돗물 공급 및 하수도관망 유지를 통해 성공적인 엑스포

개최 지원

2. 상·하수도 및 도로 공사 병행  추진

❖ 도로, 상・하수도공사와 병행 추진으로 예산절감과 이중굴착 사전예방 및 주민불편 최소화

추진방향

❍ 수도 및 하수도정비기본계획에 의거 상수도 공급 및 처리 예정지내 도로, 상하수도공사  병행 추진으로 예산절감과 이중굴착 사전예방 및 주민 불편 최소화

사업개요

❍ 위    치: 산청군 전역

❍ 사 업 량: 도로, 상하수도공사 구역 내 관로 설치 L=14km

❍ 사 업 비: 1,400백만원(하수도병행:400백만원, 도로병행:1,000백만원)

❍ 사업내용: 상하수도관로 매설 L=14km

추진계획

❍ 도로, 상하수도부서 공사내 상하수관로 병행추진대상 파악: 2021. 11 ~ 12월

❍ 공사추진                                     : 2022. 3 ~ 12월

기대효과

❍ 도로 이중포장 및 이중굴착 예방으로 예산 절감 효과

❍ 통합시공으로 지역주민 불편사항 최소화

3. 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스

❖ 옥내 급수관 누수지점 확인에 필요한 경제적 부담을 경감시켜 많은 주민들의 상수도 수리시행을 통해 유수율 높이고자 함

추진방향

❍ 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스 시행

사업개요

❍ 위    치: 산청군 급수구역 전체

❍ 사 업 량 : 300개소

❍ 사업기간: 2022. 2 ~ 2022. 11월

현    황

연 도	2016	2017	2018	2019	2020	비 고
유수율(%)	57.3	56.6	53.3	56	57.4
누수율(%)	39.1	39.4	41.1	38.3	36.5

(출저:상수도통계)

문제점 및 대책

❍ 수도 사용자들이 가정 내 누수를 인지하더라도 누수탐사 비용부담으로

수리를 하지 않는 현실

⇒ 옥내 급수관 누수탐사 예산을 편성하여 무료서비스 시행

추진계획

❍ 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스 홍보실시   : 2022. 2월중

❍ 옥내 급수관 누수탐사 무료서비스 사업시행   : 2022. 2 ~ 11월중

기대효과

❍ 노후관망 정비, 블록시스템 구축, 유지관리시스템 도입을 단계적

추진함과 동시에 옥내 누수량을 개선하여 우리군 유수율 제고

❍ 옥내 누수공사 실시하여 수도요금 절감 및 수돗물 절약 실시