2016년 군정 주요업무 평가결과

(문화관광과)

□ 총    평

❍ 지역축제의 성공적 개최를 위해 대내외 관광객을 위한 차별있고

특색있는 음악회 개최 및 다양한 문화예술 행사를 제공하였고,

각종 동호회 및 단체에 문화예술 활동 지원과 문화 취약계층을 위한       찾아가는 예술 활동 추진으로 예술로 소통하는 문화행정을 추진하였음

❍ 대도시 관광홍보 및 해외 홍보 설명회 참가, 팸투어 및 박람회 참가 등

적극적인 관광마케팅 실시를 통해 국내외 관광객 유치 및 관광산청

이미지 제고

❍ 해마다 늘어나고 있는 관광수요에 대응하기 위해 주요관광지 관광시설물 조성 및 효율적 관리․운영

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	10	5	5
군 수 공 약 사 업	8	5	3
주 요 시 책 사 업	2		2

□ 주요성과

❍ 품격 있는 문화향유 기회 확대 및 군민화합도모 (문화예술담당)

- 산청 군민 무(舞) 제작 및 보급(2016. 7 ~ 현재)

: 군민 무 지도자 양성, 각종 축제 및 행사 군민 무 시연 및 보급

- 문화가 있는 날 찾아가는 음악회「한 여름밤 힐링 음악회」(2016. 7. 27)

: 신안 윈드오케스트라 공연, 박애리, 금잔디, 강진 등 참여

- 산청군민을 위한 행복콘서트「가야심포니오케스트라 공연」(2016. 8. 19)

: 오케스트라 공연, 소프라노 김민성 외 다수 참여

- 제10회 기산국악제전(2016. 10. 1 ~ 10. 2)

: 아시아민속음악제, 국악경연대회, 박헌봉 시상 등 국악공연

- 제40회 남명선비문화축제(2016. 10. 8)

: 남명제례, 전시체험 및 문화행사

- 제43회 지리산평화제 및 군민체육대회(2016. 10. 9)

: 산신제례 및 민속놀이 등

- 문화예술회관 무료 영화상영 : 6회 920명

- 산청선비대학 수료 : 주1회 수업(수료생 42명)

❍ 체계적인 전통문화유산 계승과 문화재 보존 (문화재담당)

- 국가지정문화재 보수사업 : 율곡사 대웅전 주변정비 외 6개 사업 / 1,575백만원

- 도지정문화재 보수사업 : 산청 단계리 권씨고가 보수공사 외 10개 사업 / 961백만원

- 전통사찰 보수정비 구축사업 : 1개 사업 / 20백만원

- 전통향교문화전승보존사업 : 4개 사업 / 29백만원

❍ 전국 및 도단위 대회 유치 및 개최를 통한 생활체육 활성화 (체육담당)

- 제5회 산청군수배 전국 탁구대회, 동의보감촌 전국 마라톤대회 유치 및 개최, 산청군수배 전국 유소년 축구대회, 2016 투르 드 코리아 스페셜대회 개최, 제2회 산청군수기 전국 궁도대회, 경남도지사배 전국래프팅 대회

- 공설운동장, 산청체육센터 등 체육시설 이용

: 1,425회, 22,600명

- 호암지구 게이트볼장 건립 추진(공정율 100%)

: 총사업비 420백만원, 공사준공

- 서부지구 친환경 캠핑장 조성 추진(공정율 95%)

: 총사업비 2,270백만원, 공사준공

※ 군관리계획(재정비) 완료(경상남도)

- 생활체육시설 확충(수영장) 추진(공정율 5%)

: 총사업비 5,400백만원

※ 지방재정 투자심사(2차) 승인(경상남도), 예산(국비) 확보

- 그라운드골프장 관리실 신축 추진(공정율 100%)

: 총사업비 300백만원, 공사준공

❍ 공격적 관광마케팅 실시로 관광객 유치 활성화 (관광진흥담당)

- 외국인 관광객 유치 : 2,540명(중국, 일본, 러시아, 미국 등) 방문

- 대도시 산청관광 이미지 홍보 : 다중이용시설 13개소, 버스 42대 등

- 관광팸투어 실시 : 5회(중국 및 러시아 여행업, 코레일, 관광공사, MICE협회 관계자 등)

- 관광박람회 참가 : 2회(부산국제관광전, 대한민국 국제관광박람회)

- 지역전통문화관광자원화사업 선정․추진

: 산청한방테마파크 오감+α체험(동의보감촌 힐링캠프) 70백만원 지원

- K-트래블버스(외국인전용 버스자유여행상품) 동남권코스 동의보감촌 유치

- 지리산 천왕봉 당일 항공여행상품 개발․유치 : 3회

- 문화관광해설사 신규 양성 : 3명(중국어 1, 일본어 1 등)

- 관광안내표지판 보수 : 20개소(종합관광안내표지판, 관광유도표지판 등)

❍ 관광기반시설 조성사업 추진 (관광개발담당)

• 중산관광지 트릭아트 체험공간 조성사업 추진(공정율 70%)

- 총사업비 1,500백만원

- 리모델링공사 완료

• 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업 추진(총 공정율 40%)

- 총사업비 5,000백만원

- 지리산국립공원계획 변경 결정(환경부)

- 업무대행 협약체결 및 사업비 교부(지리산국립공원사무소)

□ 반    성

❍ 남부권역 생활체육시설 확충(수영장)을 위한 사전행정절차 및 예산(국비)확보 지연으로 사업추진에 어려움이 있었으나,

최종 예산(국비)확보로 조속한 시일내 사업 마무리 추진

❍ 중산관광지 트릭아트 체험공간 조성사업 추진 중 향후 효율적 시설 운영 및 관리를 위한 공간구성 등 전시공사 추진계획 변경을 위해 사업이 지연되고 있으나 조속한 시일내 마무리하여 사업 원활 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1월 : 신안복합 문화센터 건립사업 실시설계용역 시행

❍ 2017. 1월 : 서부지구 친환경 캠핑장 군관리계획(재정비) 결정                        완료에 따른 공원조성계획 용역 시행

❍ 2017. 1월 : 트릭아트 체험공간 조성사업 트릭아트전시공사 발주

❍ 2017. 1월 : 대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성사업 실시설계 및                     사업 추진(지리산국립공원사무소)

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(문화예술담당)
추진진도(%)	40%

17

산청문화원 운영 활성화

지역주민의 다양한 문화예술, 여가활동 및 소통 공간으로 활동되고

있는 문화원 시설 신축과 분과위원회 및 문화학교 운영 내실화 추진

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 지리 일원

❍ 사 업 비 : 1,989백만원

❍ 사 업 량 : 산청문화원 신축사업

문화원분과위원회 및 문화학교 운영 내실화

□ 추진사항

❍ 산청문화원분과(27개분과) 및 문화학교(10개반) 운영 : 연중

❍ 산청문화원 신축사업 착공  : 2016. 10월 ~ 현재

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 문화원 분과위원회 및 문화학교 운영 내실있게 지속 추진

❍ 산청문화원 신축사업 견실 시공

- 착공 : 2016. 10월

- 완공 : 2017. 6월

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	95%

20

서부지구 친환경 캠핑장 조성

(산청따라 하동길 조성사업)

자연경관이 우수한 창촌리 일원의 폐천부지 활용을 친환경 캠핑장으로 조성하여 생태적,경관적 잠재성을 도출하여 지역주민소득창출 및 관광객의 여가선용 기회 제공

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 산청따라하동길 조성사업

❍ 위    치 : 단성면 창촌리 834-25번지 일원

❍ 사 업 비 : 2,270백만원 (국 1,917, 군 299)

❍ 사 업 량 : 다목적 캠핑장 조성 A=70,000㎡

❍ 사업기간 : 2013. 4월 ~ 2017. 6월

□ 세부추진계획

❍ 2014.  6월 : 1구역 부지기반조성 및 경관조성사업 완료

❍ 2014. 12월 : 2구역 캠핑장부 시설공사 착수

❍ 2015. 11월 : 캠핑장부 기반시설 완료

❍ 2016. 10월 : 군관리계획(재정비) 결정

❍ 2017.  1월 : 공원조성계획 용역 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 군관리계획(재정비) 결정으로 농업진흥구역 해제 진행중에 있으며         공원조성계획 수립을 통한 향후 시설계획 수립

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1월 ~ 6월 : 조경공사 및 공원 조성계획 용역 시행

❍ 2018. 1월 ~ : 우리군 전국단위 축제와 연계 프로그램 개발

구 분	공약사업
담당부서	문화관광과(체육담당)
추진진도(%)	5%

21

생활체육시설 확충(수영장)

다양한 생활체육시설 확충으로 군민의 건전한 여과생활과 건강증진을 도모하고 지역한 균형적인 체육인프라 구축에 기여

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 신안소재지권 수영장 확충

❍ 사 업 비 : 50억원정도

❍ 사업내역 : 시설 건립 1식(25m, 4레인)

❍ 사업기간 : 착수일로부터 2년간

□ 추진사항

❍ 2014. 11월 : 국비 사업 건의 방문

❍ 2016.  3월 : 지방재정(2차) 투자심사 신청(경상남도)

❍ 2016.  5월 : 투자심사 조건부 승인(경상남도)

❍ 2016. 12월 : 예산(국비) 확보

□ 문제점 및 대책

❍ 막바지 국비예산이 확보(15억) 되어 2017년 추경 시 지방비 확보로

주민공청회를 거쳐 원활한 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2017.  1월 : 실시설계 용역 시행

❍ 2017.  9월 : 공사착공

❍ 2018. 12월 : 공사준공

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	70%

24

중산관광지 트릭아트 체험공간 조성

해마다 많은 등산객 및 피서객이 찾아오는 중산관광지에 관광객들이 보고 느끼고 즐기며, 체험할 수 있는 관광 매력물 조성이 절실

착시현상을 통한 신기한 체험과 추억의 사진 한 장을 남길 수 있는 트릭아트 체험공간을 조성하여 관광객 유치 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 시천면 중산리 중산관광지내

❍ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년

❍ 총사업비 : 1,500백만원 (국 750, 도 225, 군 525)

❍ 사업내용 : 트릭아트체험관 A=702㎡, 야외조형물 1식

□ 추진사항

❍ 2015.  8월 : 정밀안전진단용역 완료

❍ 2015. 11월 : 실시설계용역 완료

❍ 2015. 12월 : 공사(1차분) 착수

❍ 2016.  3월 : 공사(2차분) 착수

❍ 2016. 12월 : 리모델링공사 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 트릭아트 체험관 완공 후 운영에 따른 문제점이 발생될 것으로 예상되어       수익성이 발생 될 수 있는 공간 확보 등 활성화 방안 마련

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1월 :  트릭아트전시공사 실시설계 및 사업추진

❍ 2017. 6월 : 트릭아트 및 야외조형물 설치 완료

구 분	시책사업
담당부서	문화관광과(관광개발담당)
추진진도(%)	40%

25

대원사계곡 관광자원 생태탐방로 조성

『남한 제일의 탁족처(濯足處)』라 불리는 지리산 대원사․유평계곡을 따라 걷는 명품길을 조성하여 지리산을 찾는 탐방객에게 수려한 자연경관과 볼거리를 제공하고 국내 최고 생태체험 및 힐링 공간으로 활용

□ 사업개요

❍ 위    치 : 삼장면 평촌리(소막골 야영장)∼유평리(구 가랑잎 초교)

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년

❍ 총사업비 : 5,000백만원(국비2,500 / 도비750 / 군비1,750)

❍ 사업내용 : 탐방로 조성 3.0km(폭 1.5m)

- 명품숲길, 쉼터, 전망대, 구름다리 등

□ 추진사항

❍ 2015.  2월 : 기본계획 및 타당성 연구용역 착수

❍ 2015.  5월 : 지방재정 투자심사 의뢰 승인(경남도)

❍ 2016.  4월 : 지리산국립공원계획 변경 신청(환경부)

❍ 2016.  8월 : 지리산국립공원계획 변경 결정 고시(환경부)

❍ 2016. 11월 : 업무대행 협약체결 및 사업비 교부(지리산국립공원사무소)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2017.  1월 : 실시설계 및 사업추진(지리산국립공원사무소)

❍ 2018. 12월 : 사업완료