2016년 군정 주요업무 평가결과

(농업육성과)

□ 총    평

❍ 부자산청의 농업경쟁력 강화와 농가 소득증대를 위한 공약 및 시책사업 적극 추진

❍ 공약 및 시책사업 추진을 위한 제반절차 이행 및 관련예산 적기 확보

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	2	1			1
군 수 공 약 사 업	1				1
주요시책사업	1	1

□ 주요성과

❍ 농업기술센터 이전 및 기능강화를 위한 조직개편 및 전문 지도인력 확충

- 조직개편(2개과 → 3개과), 전문지도인력 확보(3명), 청사 리모델링 예산확보(12억원)

❍ 과학영농 실증시험단지(농업인교육관) 조성부지 확보로 농업기술센터 기능강화 기반조성

❍ 항노화 베이비 채소단지 생산시설 준공으로 고소득화 본격 생산기반 조성

- 1,617㎡규모 , 홍화⋅적무 등 12종, 1일 100∼150kg 생산

□ 반    성

❍ 첨단농업시설 신축관련 예산확보 및 제반절차 지연(교육시설, 실증시범포 등)

❍ 베이비채소 판매처의 다각화(백화점 등) 및 상품 수급체계 개선(농가 확대) 필요

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 3월 : 청사 리모델링 공사 착공

❍ 2017. 3월 : 첨단 농업시설 신축관련 예산확보 활동 추진(경남도, 농업기술원)

❍ 2017. 6월 : 실증시험단지 기반조성 및 관련 절차 이행

❍ 2017. 12월 : 청사 리모델링 공사 준공 및 이전 개소식

구 분	공약사업
담당부서	농업육성과(인력육성담당)
추진진도(%)	30%

77

농업기술센터 이전 및 기능 강화

청사 리모델링과 첨단 영농시설 설치, 전문지도사 육성 등 농업 핵심 기관인 농업기술센터 이전 및 기능강화로 부자산청 농업의 경쟁력 강화와  농업인 소득증대에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 물안실로 8 (구, 농업기술센터 일원)

❍ 사 업 비 : 100억원 (국비 45, 지방비 55)

❍ 사업내용

- 청사 이전 : 농업기술센터 청사 리모델링 및 환경개선(A=1,150㎡)

- 기능 강화 : 분야별⋅품목별 전문지도사 육성, 첨단농업 기반시설

설치(실증시험포, 농기계창고, 교육시설, 부대시설 등)

□ 추진사항

【청사 이전】

❍ 2015. 12월 : 농촌지도사업 활성화 기본계획 수립

❍ 2016.  3월 : 청사 리모델링 기본계획 수립(법령검토, 관련절차, 비교견학 등)

❍ 2016.  5월 : 청사 리모델링 공유재산 심의 및 지방재정 투자심사(산청군)

❍ 2016. 12월 : 청사 리모델링 설계용역 및 관련예산 확보(12억원)

【기능 강화】

❍ 2016.  3월 : 조직개편으로 부서인력 확충 및 전문성 강화(2명)

<인력충원(2014∼2016) 8명, 농촌지도사 전문과정 교육)

❍ 2016.  9월 : 첨단영농 실증시험단지 조성부지 매입(12,972㎡)

❍ 2016. 11월 : 첨단농업시설 설치관련 공유재산 관리계획 승인(군의회)

(농기계 창고, 농업인 교육시설, 실증시험단지 조성 등)

□ 문제점 및 대책

【청사 이전】

❍ 산청소방서의 신축청사 이전 개소 지연에 따른 청사 리모델링 지연 불가피

⇒ 설계용역, 안전진단 등 제반절차 사전 이행으로 공기 단축 및 이전 개소

【기능 강화】

❍ 기능 강화

- 휴직, 결원분야의 신규 인력 충원⋅배치에 따른 전문성 및 노하우 부족

⇒ 원예, 과수, 축산 등 분야별⋅품목별 인력배치 및 전문성 강화

□ 향후 추진계획

【청사 이전】

❍ 2017.  3월 : 청사 리모델링 설계완료 및 공사착공

❍ 2017. 11월 : 청사 리모델링 및 환경개선 공사준공

❍ 2017. 12월 : 청사 이전 개소식(3개과 통합)

【기능 강화】

❍ 2017. 3월 : 분야별⋅품목별 전문인력 양성 및 프로그램 운영

❍ 2017. 4월 : 첨단농업시설 설치관련 예산확보(교육시설, 농기계창고, 실증시험시설 등)

❍ 2017. 6월 : 첨단농업시설 제반 절차 이행(법령검토, 인⋅허가 등) 및 기반조성 공사

❍ 2018. 6월 : 첨단농업시설 보완, 주변 환경정비 및 부대시설 공사 추진