2016년 군정 주요업무 평가결과

(유통소득과)

□ 총    평

❍ 농업경쟁력 향상으로 노동력 절감, 농가소득 증대 등 기여

❍ 농특산물 홍보 및 판매활성화 기반 마련

❍ 전략약초 특화단지 조성을 통해 약초재배 농가의 소득증대 및 항노화       한방사업의 인프라 구축

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	5	2	3
군 수 공 약 사 업	3		3
주요시책사업	2	2

□ 주요성과

❍ 딸기농가 시설개선 사업 지원 : 42농가 9.4ha(1,604백만원)

❍ 국내외 공격적 마케팅 추진, 경쟁력 확보

- 국내 : 1,592,534천원, 수출 : 4,695,000달러

❍ 전략약초 육성을 위한 약초 특화단지조성 : 65농가 22ha(370백만원)

□ 반    성

❍ 토목 설계변경 및 APC 부지 무단점유인과 법적분쟁으로 착공 지연

❍ 딸기 시설개선사업 신청농가 잦은 사업변경 및 중도 포기자 발생

□ 향후 추진계획

❍ APC 건립

- 2017. 1. 14. 준공완료

❍ 국도20호 도로변 우리농산물 판매장 건립

- 2017년 : 농특산물 판매장 건립부지 협의

- 2018년 : 농특산물 판매장 착공 및 준공

구 분	공약사업
담당부서	유통소득과(시설사업담당)
추진진도(%)	71%

79

딸기농가 시설개선 사업 지원

❍ 딸기 재배시설 현대화로 고품질 딸기생산 및 노동력 획기적 절감

❍ 국제유가, 농자재 가격 상승으로 신재생에너지 및 절감시설 설치

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사업기간 : 2014년 ∼ 2017년(4년간)

❍ 사 업 비 : 7,670백만원(딸기하이베드5,720 다겹보온커튼1,950)

❍ 사 업 량 : 55ha(딸기하이베드시설40 다겹보온커튼15)

□ 추진사항(2016년도)

▶ 딸기하이베드 시설지원

❍ 사업량 : 34농가, 6.8ha

❍ 사업비 : 1,320백만원

❍ 사업내용 : 하이베드시설 + 양액시스템

▶ 시설하우스 다겹보온커튼 설치지원

❍ 사업량 : 8농가, 2.6ha

❍ 사업비 : 284백만원

❍ 사업내용 : 외부권취식, 예인식 다겹보온커튼 설치

□ 문제점 및 대책

❍ 신청농가 잦은 사업변경 및 중도 포기자 발생으로 추진애로

⇒ 사업추진 위반 시 향후 3년간 지원 대상 제외

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1월 ~ 12월 : 딸기 하이베드 시설지원 7ha, 1,320백만원

❍ 2017. 1월 ~ 12월 : 시설하우스 다겹보온커튼 설치지원 9ha, 1,078백만원

구 분	공약사업
담당부서	유통소득과(유통수출담당)
추진진도(%)	90%

80

친환경 농산물유통센터(APC) 건립

규모화ㆍ현대화된 농산물산지유통센터(APC)를 건립하여 친환경농산물의 거점확보 및 물류효율화로 농가소득 증대 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 성내리 73번지외 7필지

❍ 사 업 비 : 50억원(국 15, 도 7.5, 군 7.5, 농협 20)

❍ 사 업 량 : 부지면적 9,747㎡(건축연면적 4,278㎡)

❍ 사업내용 : 집하장, 선별장, 저온창고, 저온저장고, 예냉고, 선별 및

포장장, 탈피실, 포장기, 랩핑기, 벤딩기, 테이핑기, 화물차,                  냉동탑차, 지게차, 파레트, 선별기 등

□ 추진사항

❍ 2015. 5. 21. : 건축허가(창고시설 건축연면적 4,278.6㎡)

❍ 2016. 2. 28. : 중앙회 기술검토 및 행정계약심사 완료

❍ 2016. 7.  6. : 전기/소방/통신/저온시설 공사 계약

❍ 2016. 7.  8. : 건축공사 공사계약

❍ 2016. 7. 20. : APC 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 유통센터 부지내 무단점유 중인 민원인의 컨테이너 등 이설을 위한 토지       명도소송 등 법적절차 진행 중

⇒ 토지명도 소송에 승소 진행하였으며, 현재 대체집행 등을 위해           무단점유 중인 민원인과 협의 중

❍ 진출입로 등을 개선하기 위한 변경허가 준비 중

⇒ 토목설계변경 및 변경허가를 위해 토목설계업체와 계약 후 진행 중

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1. 14. : 공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	유통소득과(유통수출담당)
추진진도(%)	30%

81

국도20호 도로변 우리농산물 판매장 건립

안정적인 농산물 판매장 건립으로 농가소득 증대에 기여하고 우리지역 우수 농․특산물 홍보 및 판매로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면 남사리 일원(국도 20호변)

❍ 사 업 량 : 농특산물 판매장 건립 1식(50㎡)

❍ 사업내용 : 농특산물 판매장 건립

□ 추진사항

❍ 예담촌마을권역단위 종합정비사업과 연계될 수 있도록 관계부서 협의

□ 문제점 및 대책

❍ 국도변 부지확보 애로

- 예담촌마을권역단위종합정비사업장 내 농특산물 판매장이 건립 될

수 있도록 지속적인 협의 및 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 상반기 : 예담촌마을권역단위종합정비사업 착공

❍ 2017. 하반기 : 예담촌마을권역단위종합정비사업 완공 및 농특산물

판매장 건립 부지 협의

❍ 2018. 상반기 : 농산물 판매장 건립사업 착공

❍ 2018. 하반기 : 농산물 판매장 건립사업 완공