2016년 군정 주요업무 평가결과

(상하수도사업소)

□ 총    평

❍ 노후된 소규모수도시설개량 및 지방상수도 확장을 통하여 지역간 보급       불균형을 줄이고 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급으로 주민 복지

증진 기여

❍ 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	5	2	3
군 수 공 약 사 업	5	2	3
주 요 시 책 사 업

□ 주요성과

❍ 노후된 소규모수도시설개량, 지방상수도 인입 및 급수관로 누수             탐사 등을 통해 지방 및 마을 상수도의 깨끗하고 안정적인 수돗물           공급으로 수돗물에 대한 신뢰도 제고

❍ 도리지구 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 반    성

❍ 상·하수도는 사업특성상 도로굴착을 수반하여 추진함에 따라 굴착전 사전       홍보 및 굴착시 신호수 등을 배치하여 교통불편 등 민원이 최소화 될        수 있도록 사업관리에 만전을 기하겠음

□ 향후 추진계획

❍ 미확보 또는 부족분 재원 확보를 위해 도 또는 중앙부처와 지속적인       협의로 예산이 확보될 수 있도록 최선의 노력을 기하겠음

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	95%

84

산청-생초 지방상수도 통합 및 확장공사

한정된 수자원의 효율적 이용 및 지역간 수급불균형을 해소하고 안정적인 정수수질 확보와 장래 수요량 변동에 따른 능동적 대처로 지역  주민들에게 깨끗한 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 신연리 일원

❍ 사업기간 : 2010. 12월 ~ 2017. 1월

❍ 사 업 비 : 29,717백만원(국비 16,824백만원, 군비 12,893백만원)

❍ 사 업 량 : 송․배수관로 L=24.7km, 취․정수시설 5,500톤/일, 건축 및 전기 등

❍ 시공업체 : 일산종합건설(주) 외

❍ 감리업체 : ㈜도화엔지니어링

□ 추진사항

❍ 2008. 10월 ∼ 2010. 12월 : 실시설계완료 및 각종 인․허가 협의

❍ 2010. 12월 ∼ 2016. 5월 : 본공사 1차분 ~ 5차분 준공

❍ 2011. 4월 ∼ 2016. 11월 : 감리용역 1차분 ~ 4차분 준공

❍ 2016. 3월 ∼ 현재 : 본공사 6차분 추진중

❍ 2016. 11월 ∼ 현재 : 감리용역 5차분 주진중

❍ 2016. 7월 ∼ 2016. 12월 : 산청·생초 정수장 시운전완료 및 정상가동

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1월 : 본공사, 감리용역 및 기타공사 전체준공

❍ 2017. 1월 : 상수도 급수

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	20%

85

오전지구 공공하수처리시설 설치사업

농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 비 : 8,583백만원(국비70%, 기금18%, 도비6%, 군비6%)

❍ 사 업 량 : 하수처리장130㎥/일, 하수관로L=12.0km, 배수설비 312가구

❍ 사업기간 : 2016.7.13 ~ 2018. 7.12

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 : 실시설계용역 완료

❍ 2016. 6월 : 설치인가 및 재원협의, 계약심사 완료

❍ 2016. 7월 : 1차분 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1월 : 2차공사 착공

❍ 2017. 6월 : 1차공사 준공

❍ 2018. 7월 : 2차공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	25%

86

생비량지구 지방상수도 인입공사

생비량면의 수질악화 및 원수부족 등의 근본적인 문제를 해결하기 위해 지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사업기간 : 2015년 12월 ~ 2019년 02월

❍ 사 업 비 : 13,951백만원(국비 9,766백만원, 군비 4,185백만원)

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 관로 77.1km, 가압장 4개소, 전기,제어 등

❍ 시공업체 : 영일개발㈜ 외

❍ 감리업체 : ㈜선진엔지니어링 외

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 ∼ 2016. 12월 : 본공사 1차분 ~ 2차분 준공

❍ 2016. 3월 ∼ 2016. 12월 : 폐기물처리용역 1차분 ~ 2차분 준공

❍ 2016. 8월 ∼ 현재 : 건설사업관리용역 1차분 추진중

□ 문제점 및 대책

❍ 2017년도 예산은 연차별사업 계획대로 확보하였으며, 2018년도 예산확보를 위하여 관련부처(경남도 수질관리과, 환경부 수도정책과)와 지속적인 협의로 예산확보에 만전을 기하겠음

□ 향후 추진계획

❍ 2017. 1월 : 본공사 3차분 및 폐기물처리용역 3차분 착공예정

❍ 2017. 3월 : 건설사업관리용역 1차분 준공 및 2차분 착공예정

❍ 2017. 12월 : 본공사 3차분 준공 및 폐기물처리용역 3차분 준공예정