2017년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(농축산과)

□ 총    평

❍ FTA 및 고령화 등 농업환경 변화에 대응한 혁신적인 농정시책 추진으로 농업인 맞춤형 복지 실현 및 소득안정화에 기여함.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	8	5	3
군수공약사업	6	4	2
주요시책사업	2	1	1

□ 주요성과

❍ 축산분야의 축종별 전략사업 추진으로  주민소득 증대 도모

❍ 다양한 어종확보에 중점을 둔 토속어류 방류 등으로 녹색산청 실현

❍ 농촌지역 정주환경 개선을 위한 기반시설 조성으로 주민소득과 기초       생활 수준 향상 및 도농교류 활성화에 기여

□ 향후 추진계획

❍ 농업인 맞춤형 복지 실현 및 농가 경영안정지원 강화

❍ 축산분야 6차산업 활성화로 축산업 경쟁력 강화

❍ 생태하천 회복 및 어종의 다양성 확보로 토속어 방류

❍ 귀농귀촌하기 좋은 아름마을 만들기사업 추진 및 쾌적한 정주환경 조성

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	40%

75

곤충자원화 거점보육센터 조성

❖ 항노화산업과 연계한 곤충자원 산업화 기반 조성으로 다양한 일자리      창출 및 주민 소득증대 기여

❖ 미래 성장산업으로 부각되고 있는 곤충산업의 성장 토대 마련

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 차황면 양곡리 185-2번지 일원

❍ 소요예산 : 1,667백만원(국비 1,166, 도비 150, 군비 351)

❍  사업내역  :  창업 보육용 곤충사육시설(4동 660㎡), 학습동(1동 207㎡),                  체험 및 기술교육 운영 등

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2018년(3년간)

□ 추진사항

❍ 2017. 04월 : 거함산 곤충산업지원사업 변경

❍  2017. 05월  :  거함산 곤충산업지원사업 위탁 체결

(산청군⇔한국농어촌공사 진주․산청지사)

❍  2017. 05월  :  거함산 곤충산업지원사업 대면평가 및 현지 확인

❍ 2017. 12월 : 실시설계 완료 및 인허가 진행

□ 문제점 및 대책

❍  설계 변경 및 인허가 등으로 다소 지연

- 인허가 절차의 조속한 처리 등으로 적기 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 01월 : 건축물 착공

❍ 2018. 10월 : 건축물 완공

구 분	공약사업
담당부서	농축산과(전원농촌담당)
추진진도(%)	90%

77

하신마을 소공원 조성사업

하신마을의 자연생태자원인 죽림을 활용한 대나무테마공원 조성을 통하여

지속 발전 가능한 농촌환경 구축

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 신천리 하신마을 일원

❍ 사업기간 : 2015. 1. ~ 2018. 3

❍ 사 업 량 : 죽림공원 조성 A=6,200㎡(주차장, 산책로, 전망대 등)

❍ 사 업 비 : 793백만원(국비 555, 도비 71, 군비 167)

❍ 사업내용 : 주차장, 산책로, 전망대 조성, 주민역량강화사업 등

□ 추진사항

❍ 2015.  1월 : 한국농어촌공사 진주산청지사 위탁계약 체결

❍ 2015.  2월 : 기본 및 시행계획 수립 용역 발주

❍ 2015. 12월 : 사업부지 선정 및 감정평가 완료

❍ 2016. 10월 : 기본계획 승인 및 고시

❍ 2016. 12월 : 시행계획 승인 및 고시

❍ 2017.  3월 : 공사착공

□ 추진계획

❍ 2018. 3월 : 공사완료

□ 기대효과

❍ 대나무테마공원 조성을 통한 지역 개발 및 관광활성화 제고

❍ 지역주민 및 관광객들을 위한 휴식‧여가 공간 제공

구 분	시책사업
담당부서	농축산과(축산내수면담당)
추진진도(%)	30%

79

산청 흑돼지타운 조성

우리지역 흑돼지를 생산·가공·판매 등 6차 산업으로 육성하여 고부가가치 향상을 통한 안정적 소득 창출과 우리군의 대표 먹거리로 발전시켜 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금서면 매촌리 87번지

❍ 소요예산 : 1,966백만원(국비 983, 도비 118, 군비 275, 자담 590)

❍ 사업내역 : 산청흑돼지 전문판매장, 부분육 가공시설, 체험시설 등

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2018년

□ 추진사항

❍ 2017. 04월 : 산청 흑돼지타운 조성사업 대상자 신청(변경) 승인

(오부흑돼지영농조합 ⇒ 산청군농업협동조합)

❍ 2017. 05월 : 산청 흑돼지타운 조성사업 계획서 제출(농협⇒군)

❍ 2017. 11월 : 사업대상 부지 매입

□ 문제점 및 대책

❍ 설계 중이며, 검토(농협 자체) 및 변경 등으로 착공 지연 예상

⇒ 자체 검토 및 변경 등 조속한 처리로 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2018. 03월 : 실시설계 완료 및 검토(농협 자체)

❍ 2018. 04월 : 사업 착공

❍ 2018. 12월 : 사업 완공