2017년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도사업소)

□ 총    평

❍ 노후된 소규모수도시설개량 및 지방상수도 확장을 통하여 지역간 불균형을 줄이고 안심하고 마실 수 있는 수돗물 공급으로 주민복지 증진 기여

❍ 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 추진상황

구 분	추 진 실 적					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	8	3	5
군수공약사업	5	3	2
주요시책사업	3		3

□ 주요성과

❍ 노후된 소규모수도시설개량, 지방상수도 인입 및 급수관로 누수탐사 등을 통해 지방 및 마을 상수도의 깨끗하고 안정적인 수돗물 공급으로  수돗물에 대한 신뢰도 제고

❍ 도리지구 공공하수처리시설 확대 및 생활오수의 적정 처리로 수질개선에 기여

□ 반    성

❍ 상·하수도는 사업특성상 도로굴착을 수반하여 추진함에 따라 굴착전 사전홍보 및 굴착시 신호수 등을 배치하여 교통불편 등 민원이 최소화 될 수 있도록 사업관리에 만전을 기하겠음

□ 향후 추진계획

❍ 미확보 또는 부족분 재원 확보를 위해 도 또는 중앙부처와 지속적인  협의로 예산이 확보될 수 있도록 최선의 노력을 기하겠음

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(하수도담당)
추진진도(%)	75%

89

오전지구 공공하수처리시설 설치사업

농촌지역에서 무분별하게 배출되는 생활오수를 적정 처리하여 지역사회의 건전한 발전과 공중위생 향상에 기여하고 공공수역의 수질을 보전하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 오부면 오전리 일원

❍ 사 업 비 : 7,464백만원(국비70%, 기금18%, 도비6%, 군비6%)

❍ 사 업 량 : 하수처리장130㎥/일, 하수관로L=12.0km, 배수설비 312가구

❍ 사업기간 : 2016. 7. 13 ~ 2018. 7. 12

□ 추진사항

❍‘15. 12.  : 실시설계용역 완료

❍‘16.  6.  : 설치인가 및 재원협의, 계약심사 완료

❍‘16.  7. : 1차분 착공

❍‘17.  3. : 2차분 착공

❍‘17.  9. : 1차분 준공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍‘18.  7. : 2차공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	56%

90

생비량지구 지방상수도 인입공사

생비량면의 수질악화 및 원수부족 등의 근본적인 문제를 해결하기 위해 지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사업기간 : 2015년 12월 ~ 2019년 02월

❍ 사 업 비 : 13,951백만원(국비 9,766백만원, 군비 4,185백만원)

❍ 사 업 량 : 배수지 300톤, 관로 77.1km, 가압장 4개소, 전기,제어설비 등

❍ 시공업체 : 영일개발㈜

❍ 감리업체 : ㈜선진엔지니어링/(주)우진

□ 추진사항

❍‘16. 08월 : 본공사 1차분 준공 및 건설사업관리용역 1차분 착공

❍‘16. 12월 : 본공사 2차분 준공

❍‘17. 02월 : 본공사 3차분 착공

❍‘17. 03월 : 건설사업관리용역 2차분 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 생비량면 지방상수도 인입을 위해 신안면 중촌배수지 증설 필요

⇒ 중촌배수지 증설(480→900톤) 2018년 자체사업 설계 중

□ 향후 추진계획

❍‘18. 01월 : 본공사 4차분 착공

❍‘18. 06월 : 건설사업관리용역 2차분 준공 및 3차분 착공

❍‘18. 07월 : 본공사 3차분 준공

❍‘18. 12월 : 본공사 4차분 준공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	8%

93

단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업

산청군 수도정비기본계획(변경)에 의거 지방상수도가 공급되지 않은 마을에 지방상수도를 공급하고 단성정수장 증설사업을 병행 추진하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 단성면, 신안면, 신등면 일원

❍ 사업기간 : 2017년 01월 ~ 2020년 12월

❍ 사 업 비 : 19,360백만원(국비 13,552백만원, 군비 5,808백만원)

❍ 사 업 량 : 정수장 증설 Q=1,600톤/일(4,100톤/일→5,700톤/일),

관로매설 L=42km, 가압장 1식 등

□ 추진사항

❍‘17. 05월 : 실시설계용역 착공(산청급수구역과 통합 시행)

․ 용 역 비 : 871백만원(산청 240백만원, 단성 631백만원)

- 1차분: 555백만원, 2차분: 316백만원

․ 용역기간 : 2017.5.29~2018.5.28(1차분:17.5.29~18.1.23) ※ 용역중지 중

․ 용역업체 : ㈜한국종합기술/(주)신우엔지니어링/(주)동명기술공단

❍‘17. 06월 : 조사측량용역 착공(산청급수구역과 통합 시행)

․ 용 역 비 : 320백만원

․ 용역기간 : 2017.6.29~2018.6.28

․ 도급업체 : ㈜천진엔지니어링

❍‘17. 12월 : 토질조사용역 착공(산청급수구역과 통합 시행)

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍‘18. 01월 : 기본 및 실시설계용역 2차분 착공

❍‘18. 06월 : 조사측량 및 토질조사 용역 준공

❍‘18. 09월 : 기본 및 실시설계용역 준공

❍‘18. 10월 : 인‧허가 협의 및 사업 발주

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	15%

94

노후 상수관망 정비사업

노후상수관망 정비로 녹물 발생․이물질 유입 예방 등 안전한 수돗물을 공급하고 누수 저감을 통한 유수율제고 향상 및 상수도 운영․관리의 선순환 구조를 구축하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원(지방상수도 급수구역)

❍ 사업기간 : 2017년 01월 ~ 2021년 12월

❍ 사 업 비 : 21,147백만원(국비 10,573백만원, 군비 10,574백만원)

❍ 사 업 량 : 관망정비 L=37.9km, 누수탐사․정비 L=168km

블록시스템 구축 18개소, 유지관리시스템 구축 1식 등

❍ 위탁기관 : 한국환경공단

□ 추진사항

❍‘16. 04월 : 노후관망 정비사업 계획서 제출(환경부)

❍‘16. 08월 : 지방상수도 현대화 선도사업 선정(환경부)

❍‘16. 10월 : 한국환경공단 위․수탁 협약 체결

❍‘16. 12월 : 기본계획 추진방식 등 협의

❍‘17. 03월 : 기본설계 용역 설계자문위원회 개최

❍‘17. 09월 : 기본설계 용역 준공

❍‘17. 12월 : 산청군 지방상수도 현대화사업 실시설계 및 관망관리용역 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍‘18. 01월 : 누수 탐사 및 정비공사 착공

❍‘18. 04월 : 블록 및 유지관리시스템 구축공사 착공

❍‘19. 03월 : 관망 종합정비 공사 착공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도사업소(상수도담당)
추진진도(%)	6%

95

삼장지구 지방상수도 인입공사

삼장면 일원은 소규모 수도시설에 의존하고 있으나 수질 불량 및 원수 부족 등의 문제로 어려움이 있어 지방 상수도를 인입하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 일원

❍ 사업기간 : 2016년 01월 ~ 2020년 12월

- 1지구: 2016~2017년, 2지구: 2018~2020년

❍ 총사업비 : 6,863백만원(국비 70%, 군비 30%)

- 1지구: 1,163백만원, 2지구: 5,700백만원

❍ 사 업 량 : 배수지 400톤, 가압장 1개소, 관로매설 34.5km 등

□ 추진사항

❍‘16. 12월 : 실시설계용역 완료 및 총사업비 변경 협의

❍‘17. 03월 : 2지구 2018년 신규사업 신청

❍‘17. 09월 : 2지구 2018년 인센티브 선정

❍‘17. 12월 : 1지구 공사 및 폐기물처리용역 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍‘18. 01월 ~ 06월 : 설계 보완 및 인‧허가 협의

❍‘18. 07월 : 1지구 공사 준공 및 2지구 공사 착공