2019년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(주민복지과)

□ 총    평

❍ 공약사업 총 4건 중 즉시성 사업인 사회복지사 및 요양보호사 처우개선사업과 어르신,장애인 보조보행기 전동휠체어지원사업은 조기에 완료하여 사회복지사및요양보호사의 사기진작과 노인.장애인의 삶의 질 향상에 기여하였음.

❍ 산청복지타운신축과 장난감 백화점운영은 예산확보에 따른 행정절차 등 연계사업추진으로 사업진행이 지연되고 있으나, 사업추진에 차질이 없도록 노력하겠음.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4	2	0	0	2
군수공약사업	4	2	0	0	2
주요시책사업	0	0	0	0	0

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 사회복지사 및 요양보호사 매월 30,000원 지급(373명)으로 열악한        근무 환경 일부해소와 사기진작 향상

❍ 장애인보장구(전동휠체어, 전동스쿠터)등은 관련 절차를 거쳐 적합       대상자에게 100% 지원되고 있으며, 노인활동보조기 200대 지원으로       보행불편해소와 장애인의 이동권 보장에 기여

□ 반    성

❍ 산청복지타운 신축(장난감 백화점)은 예산 확보 필요에 따라 유사 사업과 연계 추진 중이나 사업 진행이 지연되고 있어 조속한 시일내 추진될 수 있도록 노력하겠음

□ 향후 추진계획

❍ 2019년 하반기 중 산청복지타운(장난감 백화점) 신축공사 기본 및 실시 설계 완료

구 분	공약사업
담당부서	복지민원국 주민복지과(여성가족담당)
추진진도(%)	10%

1

산청복지타운 신축

○ 열악하고 협소한 공간에 분산운영 중인 건강가정다문화가족지원센터 및 자활센터 등 복지시설을 한곳에 모은 산청복지타운을 신축하여 군민 복지증진에 기여함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 725번지 일원

❍ 사 업 비 : 5,072백만원

❍ 사업내용 : 산청복지타운 건립(1동, 4층 규모, 연면적 1,980㎡)

□ 추진사항

❍ 2018. 4월 : 신축 계획 수립 및 지방재정투자 심사 승인

❍ 2018. 11월 : 공유재산심의회 의결, 의회 공유재산 관리계획 승인

❍ 2018. 12월 : 읍 농촌중심지 활성화사업 연계 추진 결정(사업비 2,728백만원)

□ 문제점 및 대책

❍ 읍 농촌중심지 활성화사업 연계 추진에 따른 사업 지연

: 읍 농촌중심지 활성화사업 기본계획 승인․고시 후 추진(2019.7월)

❍ 국도비 예산 추가 확보 필요

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 8월 : 신축공사 기본 및 실시 설계

❍ 2020. 1월 ~ 2021. 6월 : 건물 착공 및 준공

구 분	공약사업
담당부서	복지민원국 주민복지과(여성가족담당)
추진진도(%)	10%

2

장난감백화점 운영

○ 어린이들을 위한 돌봄 공간인 공동육아나눔터와 더불어 장난감 대여, 북 카페 등의 장난감백화점을 운영함으로써 육아지원 서비스 제공을 통한 가정 내 육아 부담 경감 및 고충을 해소함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 725번지 일원/ 산청복지타운 내

❍ 사 업 비 : 450백만원

※예산확보 시기 : 2021년

❍ 사업내용 : 장난감백화점 설치 및 운영(1개소, 연면적 200㎡)

□ 추진사항

❍ 2018. 4월 : 산청복지타운 신축사업 연계 추진 결정

□ 문제점 및 대책

❍ 산청복지타운 신축사업 연계 추진에 따른 사업 지연

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 8월 : 산청복지타운 신축공사 기본 및 실시 설계(장난감백화점 포함)

❍ 2020. 1월 ~ 2021. 6월 : 건물 착공 및 준공

❍ 2021. 7월 ~ : 비품 구입 및 개소 운영