2019년 상반기 군정 주요업무 평가결과

( 재 무 과 )

□ 총    평

❍ 아름다운 직원 후생복지시설 신축사업을 당초 계획대로 추진하고 있으나, 실시설계 용역, 추가 사업비(토공 등)가 필요한 것으로 사료되며, 당초 계획대로 11월에 준공하여 성과 거양

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	1		1
군수공약사업	0
주요시책사업	1		1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 총 사업비 : 1,860백만원

- 당초 본예산 :  60백만원

- 1회 추경예산 : 1,400백만원

- 2회 추경예산 확보 계획 : 400백만원

□ 반    성

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 실시설계 용역 완료 : 2019. 7월

❍  2회추경 추가 예산확보 : 2019. 하반기

❍ 사업 착공 및 준공 : 2019. 9월~11월

구 분	시책사업
담당부서	재무과(재산관리담당)
추진진도(%)	30%

1

아름다운 직원 후생복지시설 신축

○ 다양한 행정수요 충족 및 질 높은 행정서비스 제공을 위한 기틀 마련

○ 직원들의 건강증진을 위한 후생복지시설 신축으로 업무능률 향상

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 425-1번지 외 2필지

❍ 사업기간 : 2019. 3월 ~ 2019. 11월

❍ 사 업 비 : 1,860백만원(군비)

❍ 사 업 량 : 지상 2층 건축연면적 597.45㎡

❍ 사업내용 : 사무실, 휴게실 등

□ 추진사항

❍ 2017.  5. 15. : 직원 후생복지시설 신축을 위한 계획 수립

❍ 2017. 12.  1. : 부지매입

❍ 2018. 11. 15. : 공유재산 관리계획(변경) 승인

❍ 2019.  3.  5. : 실시설계 용역 발주

□ 향후 추진계획

❍ 2019.  7. 22. : 실시설계 용역 완료

❍ 2019. 하반기 : 2회추경 예산 확보(4억)

❍ 2019.  9월~11월 : 사업착수 및 준공

□ 기대효과

❍ 직원 복지향상 기여 및 사무환경 개선으로 업무능률 향상