2019년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(문화체육과)

□ 총    평

❍ 일회성 행사가 아닌 상설공연을 기획함으로써 문화와 예술에 대한 접근성을 높여 지역민과 방문객에게 차별있고 특색있는 문화 향유 기회를 제공하였고,  각종 동호회 및 단체에 문화예술 활동 지원과 문화 취약계층을 위한 찾아가는 예술 활동 추진으로  예술로 소통하는 문화행정을 추진하였음

❍ 우리나라 목화의 발상지인 목면시배유지의 체계적인 정비와 문화재 활용을 통한 관광자원을 개발하고자 ‘산청 목면시배 유지 종합정비 기본계획 수립 용역’을 완료하였으며, 국정과제로 추진 중인 「가야문화권 조사연구 및 정비」사업과 보조를 맞춰 산청 가야사의 보존·정비 및 성격 규명에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 중촌리고분군에 대한 측량 및 정밀실측조사를 실시하였고, 산청 생초고분군의 종합정비계획, 시굴조사, 발굴조사를 추진하고 있음

❍ 생활체육대회 개최 및 유치를 통한 스포츠로 하나되는 유쾌한 지역분위기를 조성하는 한편 엘리트체육 전지훈련 유치로 생활체육과 엘리트체육의 균형있는 발전을 도모함

❍ 공공체육시설 확충 및 유지보수를 통해 군민에게 쾌적한 체육시설을 제공하여 건강증진 및 삶의 질 향상에 이바지하였음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	7		6		1
군수공약사업	5		5
주요시책사업	2		1		1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 품격있는 문화향유 기회 확대 및 군민화합도모(문화예술담당)

ㆍ문화예술 기반시설 확충 및 운영 활성화 추진

- 한국선비문화연구원 생활관 확충사업 추진 : 1,317㎡(지상 3층), 3,600백만원

- 작은영화관 건립사업 추진 : 700㎡(50석, 2개관), 1,400백만원

- 남부도서관 건립사업 설계용역 추진 : 1,200㎡(지상 2층), 3,850백만원

- 기산국악당 교육관 증축 : 120㎡, 500백만원

ㆍ우수 문화관광콘텐츠의 상설공연 개최로 볼거리 제공

- 기산국악당 토요상설공연 운영(5~6월) : 10회 (연22회)

- 동의보감촌 상설 마당극 운영(5~6월) : 8회 (연22회)

ㆍ군민 참여형 다양한 문화예술 공연 개최

: 문화예술회관 정기공연(4회) 및 공연장 상주단체 극단 현장 공연(4회),      우수예술단체 찾아가는 공연(1회), 제7회 장사익 찔레꽃음악회 공연

ㆍ산청선비대학 운영 : 주1회 60여명 (연36회)

❍ 체계적인 전통문화유산 계승과 문화재 보존(문화재담당)

· 산청 목면시배유지 정비사업(공정율 90%)

: 200백만원(산청 목면시배유지 종합정비 기본계획 수립 용역 외 1개 사업)

· 산청 가야역사문화 현황조사(공정율 100%)

: 50백만원(산청 가야역사문화 학술연구 용역-중촌리 고분군)

· 단속사지 발굴사업(공정율 75%)

- 총사업비 : 3,056백만원

- 기본계획용역 : 58백만원

- 보상실적 : 1,727백만원(토지 36필지, 주택 11동 보상완료)

- 발굴조사 : 1,271백만원(조사면적 17,083㎡)

· 단속사지 이주단지 조성사업(공정율 45%)

: 1,400백만원, 실시설계 완료, 대지조성사업 협의 중

· 국가지정문화재 보수사업(공정율 40%)

: 2,802백만원(산청 조식 유적 주변정비공사 외 8개 사업)

· 도지정문화재 보수사업(공정율 50%)

: 752백만원(산청 생초고분군 종합정비 계획수립 및 시굴조사 외 13개 사업)

· 전통사찰 보수정비사업(공정율 10%)

: 250백만원(율곡사 공양간 및 종무소 보수), 실시설계 완료

· 전통문화 보존 및 전승사업(공정율 50%)

: 165백만원, 덕양전 춘추향제례외 3개 사업

❍ 생활체육 활성화를 통한 활력있는 지역분위 조성 및 엘리트체육 전지훈련 유치를 통한 전국적 교류 네트워크 형성(체육행정담당)

· 제58회 경남도민체육대회 : 18개종목 411명 참가 / 종합순위 8위

· 생활체육지도자 배치지원 : 10명(일반지도자 5명, 어르신지도자 5명)

· 전지훈련팀 유치 : 축구, 테니스, 씨름 90팀 2,300명(연인원 30,513명)

· 각종 대회 유치 및 개최 : 제3회 경남테니스협회장배 시군대항 테니스대회,  제48회 전국소년체육대회 태권도 경남대표선수 최종선발전, 제8회 산청군협회장배 전국오픈탁구대회, 제15회 산청군축구협회장기 기관별 축구대회, 제11회 경남도지사기 시군 대항 테니스대회

❍ 체육시설 확충 및 유지관리를 통한 군민의 건강하고 활기찬 생활 원동력 조성(체육시설담당)

· 남부 문화체육센터 신축공사(공정율 45%)

: 8,500백만원(2층 골조공사 진행 중)

· 산청 공설운동장 정비사업(공정율 10%)

: 5,800백만원(우레탄트랙 철거완료, 실시설계용역 마무리 중)

· 읍면 야외운동기구 설치사업(공정율 100%)

: 150백만원(11개읍면 16개소)

· 생비량 야외게이트볼장외 1개소 차광시설 설치공사(공정율 100%)

: 100백만원(생비량 야외게이트볼장, 오부(오전) 야외게이트볼장)

· 남부체육공원 내 본부석 정비사업(공정율 70%)

: 300백만원(본부석 A=127.98㎡)

· 금서 야외게이트볼장 설치사업을 위한 부지매입 완료

: 150백만원(A=985.0㎡)

· 산청 궁도장(산청정) 관리사 확장(증축)공사(공정율 100%)

: 200백만원(A=69.48㎡)

· 덕산체육공원 내 탁구장 설치공사(공정율 30%)

: 450백만원(A=349.2㎡)

· 신등 그라운드골프장 조성공사(공정율 90%)

: 300백만원(A=2,580㎡)

· 산청 실내체육관 장애인 편의시설 설치공사(공정율 10%)

: 50백만원(휠체어리프트 설치 등)

· 산청 실내수영장 여과기 교체공사(공정율 100%)

: 100백만원(여과기 및 노후시설 교체)

· 산청 근린생활형 국민체육센터 조성공사(공정율 10%)

: 1,950백만원(A=994.0㎡, 실시설계용역 진행 중)

□ 반    성

❍ 남부 문화체육센터 주차공간 확보를 위한 신안게이트볼장 철거협의 지연에 따른 애로사항이 있으나 지속적인 협의를 통해 남부체육공원으로 이전 설치

❍ 남부지역 공공도서관 건립사업의 도교육청 건립비 10억원 지원이 불가하여 군비 부담금이 증액되어 특교세 등 예산확보 방안 강구

❍ 생초체육공원 체육시설 부지보상 미협의시 인근 농지 매입 후 사업추진을 해야함에 따라 농업진흥구역 해제 등 사업이행에 장기간 소요 예상

❍ 신명사도 실천유학 문화체험장 조성에 있어 시군별 단위사업으로 추진 시 예산반영의 어려움이 있으므로 연계가능한 광역개발사업 발굴 필요

□ 향후 추진계획

❍ ‘19. 10월 : 경호강 래프팅시설 공사착공 후 ‘20. 4월 준공

❍ ‘20.  2월 : 남부 문화체육센터 공사 준공 후 ‘20. 4월 개장

❍ ‘19.  9월 : 남부지역 공공도서관 착공 후  ‘20. 9월 개관

❍ ‘19.  7월 : 도천서원 방충사업 완료 후 ‘20. 8월 보수사업 완료

❍ ‘19.  7월 : 산청공설운동장 정비 공사 착공 후 연내 준공

❍ ‘19.  9월 : 신명사도 실천유학 문화체험장 기본계획 수립 용역 완료

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	10%

21

경호강 관광화 사업(래프팅시설, 체육시설)

○ 경호강을 이용한 관광자원 개발 및 주민 편의시설 확충으로 지역경제      활성화 및 삶의 질 향상 도모

○ 래프팅타운 내 편의시설 설치로 하절기 대표 관광자원인 래프팅산업의      육성을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 865-2번지 일원

❍ 사 업 비 : 800백만원(국비 320 군비 480)

❍ 사 업 량 : 래프팅 및 체육시설 설치 1식

❍ 사업내용 : 화장실 1동, 쉼터, 간이족욕장 설치 1식, 청소년체육시설 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 12월 : 2019년 사업예산(3억원) 확보

❍ 2019.  3월 : 화장실 설치를 위한 사전행정절차 이행

❍ 2019.  5월 : 2020년 사업예산(5억원) 신청

□ 문제점 및 대책

❍ 경호강 관광화사업과 연계한 종합발전계획에 의거 사업추진 필요

→ 2018년 경상남도 2단계 지역균형발전사업 선정

→ 산청읍 농촌중심지 활성화사업을 통한 조산공원 주변 체육시설 정비       및 주민 편의시설 확충

❍ 래프팅시설물 설치를 위한 래프팅협회 협의지연

→ 래프팅 시즌 종료 후 래프팅 타운 내 관광객 편의시설 확충

□ 향후 추진계획

❍ 2019.  8월 : 실시설계용역 시행

❍ 2019. 10월 : 공사착공

❍ 2020.  4월 : 공사준공

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	45%

22

남부 문화체육센터(수영장+작은영화관)

○ 삶의 질 향상에 따른 복합 문화체육센터 수용 급증에 대한 기대에 부흥하고 문화       여가 기반시설 제공을 통한 군민의 문화복지 증진에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 930-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 8,500백만원(국비 2,260 도비1,710 군비 4,530)

❍ 사 업 량 : 문화체육센터 건립 1식〔지하1층 지상2층 철근콘크리트조(연면적 A=2,598㎡)〕

❍ 사업내용 : 수영장(25m×4레인), 작은영화관(50석규모 2개소), 체력단련실, 카페테리아 등

□ 추진사항

❍ 2018. 10월 : 계약심사 등 행정절차 이행 및 사업발주

❍ 2018. 12월 : 공사착공

❍ 2019.  7월 : 지하층 및 1층 구조물 설치

□ 문제점 및 대책

❍ 신안게이트볼장 철거협의 지연에 따른 주차공간 확보 애로

→ 산청군게이트볼협회 신안면분회와의 지속적인 협의를 통한 남부체육        공원으로 이전설치

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 2월 : 사업 완료

❍ 2020. 3월 : 시운전 및 점검

❍ 2020. 4월 : 개장 및 운영

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	10%

23

남부지역 공공도서관 건립

○ 인구 증가와 삶의 질 향상에 따른 독서문화 활동 및 평생교육 수요 급증으로 도서관 건립을 통한 종합문화공간을 조성하여 군민의 문화 복지 향상에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 932-1번지 일원

❍ 사 업 비 : 3,850백만원(국비 1,600 군비 2,250)

❍ 사 업 량 : 공공도서관 1동 건립(연면적 1,200㎡, 지상2층)

❍ 사업내용 : 자료실(일반·어린이·유아), 문화강좌실, 북카페, 서고 등

□ 추진사항

❍ 2018. 2월 : 산청군 지방 재정투자심사 승인

❍ 2018. 3월 : 2018년 상반기 공공도서관 건립 지원사업 사전평가 실시

❍ 2018. 7월 : 공유재산 관리계획 의결

❍ 2019. 1월 : 산청군 ↔ 도교육청 공공도서관 건립운영에 대한 협약체결

❍ 2019. 4월 : 기본 및 실시설계용역 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 도교육청의 건립비 10억원 지원이 불가하여 추가로 확보해야 할 군비 부담금 증액

☞ 특별교부세 또는 추경 시 부족한 사업비 확보

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 8월 : 기존 건축물 철거

❍ 2019. 8월 : 설계용역 완료 및 건축협의

❍ 2019. 9월 ~ 2020. 6월 : 공사착수 및 준공

❍ 2020. 9월 : 도서관 개관

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	10%

24

생초 체육공원 구역 확장

○ 생초생활체육공원 인근 공한지를 활용한 체육시설 확충으로 생활체육      저변확대 및 군민 건강증진 도모

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 101-1번지 일원(A=1,982㎡)

❍ 사 업 비 : 500백만원(국비 200 군비 300)

❍ 사 업 량 : 소규모 체육시설 1식

❍ 사업내용 : 소규모 겸용 체육시설(풋살장 겸 족구장) 건립 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 9월 ~ 2019. 3월 : 체육시설 부지보상 협의, 관련부서 사업추진 협의

※ 생초면 농촌중심지 활성화사업 내 사업내용 포함 추진 중

□ 문제점 및 대책

❍ 체육시설 설치 대상부지 토지소유자 보상 협의

☞ 체육시설 부지보상 미협의시 인근 농지(농업진흥구역) 매입 후 사업추진

(농업진흥구역 해제 등 사업이행 장기간 소요예상)

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 12월 : 준공

구 분	공약사업
담당부서	문화체육과(문화재담당)
추진진도(%)	35%

25

도천서원 정비사업

○ 경상남도 유형문화재 제237호 산청 도천서원 신안사재의 종합정비 기본계획을 수립하여, 체계적인 관리 및 정비를 통한 소중한 문화유산 보존

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 신안리 177번지 일원

❍ 사 업 비 : 200백만원(도비 100 군비 100)

❍ 사 업 량 : 도천서원 정비사업 1식

❍ 사업내용 : 종합정비 기본계획수립, 방충제 도포, 건축물보수 정비

□ 추진사항

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 종합정비 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2019. 1월 : 설계용역 발주 및 완료(‘19년 사업 : 방충사업)

❍ 2019. 4월 : 설계승인(경상남도)

❍ 2019. 5월 : 방충사업 착수

❍ 2019. 6월 :‘20년도 사업분(건축물 보수) 예산신청

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 7월 : 방충사업 완료

❍ 2020. 3월 : 건축물 보수사업 착수

❍ 2020. 8월 : 건축물 보수사업 완료

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(체육시설담당)
추진진도(%)	10%

26

산청 공설운동장 정비사업

○ 노후된 공설운동장을 정비하여 군민들의 여가활동에 부응하는 전문체육시설      조성으로 각종 대회(전지훈련) 유치 등으로 군민복지 증진 및 지역경제      활성화에 기여

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 1번지 내(A=85,519㎡)

❍ 사 업 비 : 5,800백만원(국비 2,320 군비 3,480)

❍ 사 업 량 : 운동장 재정비 1식

❍ 사업내용 : 우레탄트랙 및 축구장 인조잔디 교체 1식, 본부석 정비,                   조명교체, 전광판 설치, 실내씨름장 조성, 부대시설 정비 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 8월 : 공설운동장 정비사업 조사측량 및 실시설계용역 착수

❍ 2018. 10월 ~ 11월 : 주민공청회 실시(2회)

❍ 2019. 7월 : 실시설계용역 완료

□ 문제점 및 대책

❍ 사업추진 방향 변경에 따른 계획변경승인 및 실시설계용역 추진 지연

☞ 문체부 사업계획 변경승인 완료로 연내 사업마무리 예정

□ 향후 추진계획

❍ 2019.  7월 : 계약심사 등 공사발주

❍ 2019.  8월 : 공사 착공

❍ 2019. 12월 : 사업 준공

구 분	시책사업
담당부서	문화체육과(문화예술담당)
추진진도(%)	2%

27

신명사도 실천유학 문화체험장 조성

○ 남명의 실천유교사상을 모티브로 한 체험장 조성으로 한국선비문화연구원과 남명기념관, 산천재를 연계하여 시대정신으로서 남명사상의 재조명 및 국가 인성교육의 거점으로 육성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 900-48번지 일원

❍ 사 업 비 : 20,000백만원(국비 10,000 도비 5,000 군비 5,000)

❍ 사 업 량 : 신명사도 실천유학 문화체험장 조성

❍ 사업내용 : 신명사도를 모티브로 한 체험장, 전시관, 조형물, 제자흉상 제작 등

□ 추진사항

❍ 2018. 4월 : 경남도 남명 선비문화 계승발전 종합계획 세부실행대상사업 선정

❍ 2019. 2월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 시행

□ 문제점 및 대책

❍ 문화체육관광부 및 경남도 관련부서 협의 결과 시군별 단위사업으로  추진 시 예산반영에 어려움 있음

☞ 타시군과 연계사업 또는 광역권 개발사업에 반영하여 사업추진

□ 향후 추진계획

❍ 2019.  9월 : 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2019. 10월 : 투융자심사 및 사전 행정절차 이행

❍ 2020.  1월 : 기본 및 실시설계용역 발주

❍ 2020. 10월 ~ 2022. 6월 : 공사착수 및 준공

❍ 2022.  9월 : 개장