2019년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도과)

□ 총    평

❍ 소규모수도시설개량 및 지방상수도‧공공하수도 수혜지역 확장을 통하여 안정적이고 깨끗한 상수원 공급과 생활오수를 적정 처리하여 수질오염을 예방함으로서 주민 불편 해소, 안정적인 수돗물 공급으로 주민복지 증진에 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4		3		1
군수공약사업	3		2		1
주요시책사업	1		1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 관내 수도 보급률 98.3%를 목표로 수도정비기본계획(변경)을 환경부 승인 득함에 따라  지방상수도 확장사업 추진 및 필요 재원 확보를 위한 근거 마련하고,지역주민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하여 행정 신뢰도 향상됨.

❍ 관내 하수처리구역 확장 보급률 92.1%를 목표로 하수도정비기본계획(변경)을 수립하여 환경부 승인을 득함에 따라 지방 공공하수처리구역 확장 사업 추진 및 필요 재원 확보를 위한 근거 마련으로 공중위생 및 공공수역의 수질보전이 항상됨.

□ 반    성

❍ 상하수도정비기본계획(변경) 수립 및 환경부 승인 절차 이행으로 그간 지방상하수도 확장사업이 지연되었으나, 2019년 2월 승인 완료됨에 따라 사업 조속 추진하여 지방상수도 및 공공하수도 확장 공급에 차질이 없도록 조치함.

□ 향후 추진계획

❍ 지방상수도 확장을 위한 미확보 또는 부족 재원 확보를 위해 경남도 및 중앙부처와 지속적인 협의로 예산 확보 노력

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	15%

73

지방상수도 수혜지역 확장

○ 산청군내 지방상수도 미급수 지역의 원수 부족 및 수질 불량 등의 문제로 어려움이 있어 지방상수도 수혜지역 및 취·정수 시설 확장 통하여 안정적이고 깨끗한 상수도를 공급하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 비 : 46,224백만원(국 32,356, 지 13,868)

❍ 사 업 량 : 정수장 증설(단성, 시천), 배수지 설치(오부, 삼장)

관로매설 120㎞, 가압장 및 감압변 설치 1식

❍ 사업내용 : 지방상수도 수혜지역 및 시설 확장

□ 추진사항

❍ 2017. 05월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 착수

❍ 2018. 11월 : 시천 급수구역 확장사업 부분 준공(삼장면 신촌 ~ 대포)

❍ 2019. 02월 : 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립

❍ 2019. 05월 : 단성취수장(집수매거) 하천점용 등 인·허가 및 공사 착공

❍ 2019. 06월 : 2020년 산청, 단성, 시천 급수구역 예산 신청(균특회계)

□ 문제점 및 대책

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립 지연으로 지방상수도 확장사업이 다소 지연되었으나, 2019년 2월 환경부 최종 승인 완료하여 수도정비기본계획에 의거 급수 구역별 예산 확보 및 공사 조속 추진토록 조치

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 10월 : 시천 급수구역(삼장면 대포 ~ 홍계) 총사업비 변경 협의 및 공사 착공

❍ 2019. 10월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 준공

❍ 2019. 11월 : 산청 및 단성 급수구역 인·허가 및 공사 착공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	85%

75

지방상수도 인입공사 조기 마무리(생비량면)

○ 생비량면의 수질악화 및 원수부족 등의 근본적인 문제를 해결하기  위해 지방상수도를 인입하여 지역주민들에게 안정적인 지방상수도 공급

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 사 업 비 : 14,951백만원(국 9,766, 군 5,185)

❍ 사 업 량 : 배수지(300톤) 1식, 관로매설 77.1㎞, 관로매설 구간 포장 1식

가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

❍ 사업내용 : 생비량면 지방상수도 급수구역 확장

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 착공(총괄분)

❍ 2018. 10월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 준공(1,2,3차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 기성(4차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 포기(시공사 영일개발)

❍ 2019. 05월 ~ 06월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 타절 정산

□ 문제점 및 대책

❍ 생비량지구을 포함한 단성 급수구역내 용수원 부족으로 지방상수도 공급에 다소 어려움이 예상됨에 따라 취․정수장 및 중촌배수지 증설을 통해 적기 공급토록 조치

❍ 시공사(영일개발) 공사 포기에 따라 타절 정산 및 잔여분 조속 발주하여 년내 준공

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 07월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 타절 정산 및 잔여분 발주

❍ 2019. 12월 : 생비량면 지방상수도 시운전 및 공사 준공

구 분	시책사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	67%

76

노후 상수관망 정비사업

○ 노후상수관망 정비를 통한 녹물 발생, 이물질 유입 등을 예방하여 안전한 수돗물을 공급하고 누수 저감을 통한 유수율 제고 및 상수도 운영․관리의 선순환 구조를 구축하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 사 업 비 : 25,097백만원(국 12,548, 지 12,549)

❍ 사 업 량 : 관망정비 L=40.4km, 누수탐사·정비 L=557km

블록시스템(중블록 5개소, 소블록 16개소) 및 유지관리시스템 구축 등

❍ 사업내용 : 지방상수도 노후 관망정비 및 현대화 사업

□ 추진사항

❍ 2016. 10월 : 위·수탁 협약체결(산청군-한국환경공단)

❍ 2017. 09월 : 기본설계 용역 준공

❍ 2017. 11월 : 실시설계 및 관망관리 용역 착공

❍ 2018. 06월 : 블록시스템 구축공사 착공

❍ 2018. 12월 : 유지관리시스템 구축공사 착공

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 급수구역 블록 및 시설 현대화로 수도시설 관리 기반을 마련하였으나, 재정상 문제로 상수 관로 노후화 진행에 따른 대처 부족으로 관로 노후화가 누적되어 수도 경영의 악순환이 반복되는 실정으로, 노후 관로 개선을 위한 정부 정책 반영과 지속적인 사업 발굴 및 예산 확보 노력 필요

※ 관내 전체 노후관로(11년이상) : 128km(사업비 약 243억원)

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 09월 : 블록시스템 구축공사 준공 및 관망정비공사 착공

❍ 2021. 12월 : 시설공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(하수도담당)
추진진도(%)	5%

74

공공하수도 수혜지역 확장

○ 공공하수도 수혜지역 확장 사업을 통해 생활오수를 안정적으로 처리      하여 양질의 수자원 확보 및 주민보건 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 모고리, 차황면 상법리 일원

❍ 사 업 비 : 총 12,416백만원(국비 8,692, 지방비 3,724)

- 모고지구 : 7,991백만원(국비 5,594, 지방비 2,397)

- 상법지구 : 4,425백만원(국비 3,098, 지방비 1,327)

❍ 사업내용

- 모고지구 : 하수관로 8.48km, 배수설비 287가구(558명), 맨홀펌프장 6개소

- 상법지구 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 3.47km, 배수설비 145가구(269명)

□ 추진사항

❍ 2018.  7월 : 실시설계용역 착수(상법지구)

❍ 2018. 11월 : 실시설계용역 착수(모고지구)

❍ 2019.  1월 : 2020년 하수도분야 예산신청

❍ 2019.  6월 : 실시설계용역 준공(상법지구,모고지구)

□ 문제점 및 대책

❍ 중앙부처(기획재정부) 예산확보 협조 요청

□ 향후 추진계획

❍ 2020년 하수도분야 예산 확보 후 사업 추진