2019년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(보건증진과)

□ 총    평

❍ 치매안심센터, 정신건강복지센터 등 신규 공공보건의료서비스 사업이

증가함에 따라 보건의료원 증축으로 보건의료서비스 제공

❍ 노후화 된 신안보건지소 및 내대보건지료소 이전 신축으로 지역주민들에

쾌적한 진료환경 조성과 의료서비스 제공

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	3		3
군수공약사업
주요시책사업	3		3

□ 주요성과

❍ 2018. 11. 19. : 보건의료원 증축 공사 착공

❍ 2019.  3.  6. : 신안보건지소 이전신축공사 착공

❍ 2019.  2.  1. : 내대보건진료소 이전신축공사 설계용역 시행

□ 반    성

❍ 치매안심센터 및 신안보건지소 이전신축공사 예산확보 및 BF 예비인증

처리 등으로 사업비 이월하여 착공 지연됨

❍ 내대보건진료소 BF예비인증 처리 등에 따른 설계용역기간 연장

□ 향후 추진계획

❍ 보건의료원 증축공사 준공 : 2019. 8월

❍ 신안보건지소 이전 신축공사 준공 : 2019. 8월

❍ 내대보건진료소 이전 신축공사 착공 : 2019. 8월

구 분	시책사업
담당부서	보건증진과(보건행정담당)
추진진도(%)	80%

77

보건의료원 별관 증축

치매안심센터, 정신건강복지센터 등 신규 공공보건의료서비스 사업이

증가함에 따라 보건의료원 증축으로 맞춤형 보건의료서비스제공에 기여하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 중앙로 97 보건의료원 내 별관증축

❍ 사 업 비 : 2,347백만원

- 18년 예산액 : 1,767백만원 (국비 1,073, 도비 497, 군비 197)

- 19년 예산액 : 580백만원 (군비)

❍ 건축면적 : 881.52㎡

❍ 사업내용 :

- 1층(167.88㎡) : 치매안심센터(사무실, 검진실 등)

- 2층(337.28㎡) : 치매안심센터(프로그램실, 쉼터, 가족카페 등)

- 3층(376.36㎡) : 정신건강복지센터, 건강증진실, 재활치료실 등

□ 추진사항

❍ 2018년 농어촌의료서비스개선사업 확정 통보 : 2018. 1. 2.

❍ 기본 및 실시설계용역 : 2018. 2. 19.~8. 25.

❍ 보건의료원 증축공사 착공 : 2018. 11. 19.

□ 문제점 및 대책

❍ 특이사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 보건의료원 증축공사 준공 : 2019. 8월

❍ 보건의료원 증축공사 개소 : 2019. 9월

구 분	시책사업
담당부서	보건증진과(보건행정담당)
추진진도(%)	85%

78

신안보건지소 이전신축

1979년에 건립되어 노후화 된 신안보건지소를 이전신축하여 지역주민들에게   쾌적한 진료환경 조성과 의료복지 향상을 도모하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 606번지 외 1필지

❍ 사 업 비 : 467백만원【국비 311, 도비 78, 군비 78】

❍ 건축면적 : 238㎡ (지상2층)

❍ 주요시설 : 진료실, 건강증진실, 처치실, 소독실, 공중보건의사 숙소

□ 추진사항

❍ 2018년 농어촌의료서비스개선사업 확정 통보 : 2018. 1. 2.

❍ 기본 및 실시설계용역 : 2018. 7. 12.~2019. 2. 14.

❍ BF 예비인증 용역 : 2018. 9. 11.~2018. 12. 05.

❍ 신안보건지소 이전신축공사 착공 : 2019. 3. 6.

□ 문제점 및 대책

❍ 특이사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 신안보건지소 이전신축공사 준공 : 2019. 8월 초

구 분	시책사업
담당부서	보건증진과(보건행정담당)
추진진도(%)	10%

78

내대보건진료소 이전신축

1998년에 건립되어 노후된 내대보건진료소를 이전 신축하여 지역주민들에게

쾌적한 진료환경 조성과 의료서비스 제공하고자 함

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 시천면 내대리 587-13번지

❍ 사 업 비 : 304백만원【국비 204, 도비 50, 군비 50】

❍ 건축면적 : 149㎡ (지상2층)

❍ 주요시설 : 진료실, 건강증진실, 대기실, 숙소

□ 추진사항

❍ 2019년 농어촌의료서비스 개선사업 확정 통보 : 2019. 1. 16

❍ 기본 및 실시설계용역 : 2019. 2. 1.~2019. 7. 31.

❍ BF 예비인증 용역 : 2019. 4. 23.~6. 30.

□ 문제점 및 대책

❍ 특이사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 공사 착공 : 2019. 8월

❍ BF 본인증 용역 : 2019. 9월

❍ 공사 준공 : 2019. 12월