2019년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(재무과)

□ 총  평

❍ 아름다운 직원후생복지시설 신축사업을 당초 계획대로 추진하고 있으며,  효율적인 공간 활용을 위해 2019년 11월 설계변경을 추진하여 2020년 2월 준공 예정임

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	1		1
군수공약사업
주요시책사업	1		1

□ 주요성과

❍ (2019.10월) 직원후생복지시설 착공

❍ (2019.11월) 효율적인 공간 활용을 위한 설계변경

- 건축 연면적 확대: 당초 600㎡(지상 2층)⇒변경 지상 2층(893㎡),지하 2층 (591㎡)

- 주차 공간 확충: 당초 5대 ⇒ 변경 55대

□ 향후 추진계획

❍ 2019년10월 착공 후 공간의 효율적 활용을 위해 2019년 11월 설계변경 후 시공하여 2020년 2월 중 완공 예정

구 분	주요시책사업	담당부서	재무과 재산관리담당 (담당자 권희덕)
추진실적	50%	완료예상	2020년 2월

아름다운 직원후생복지시설 신축

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 3월 - 2020. 2월

❍ 위    치 : 산청읍 옥산리 425-1번지 일원

❍ 소요예산 : 1,970백만원(군비)

❍ 사업내용 : 건축물 1동(지상 2층, 지하 2층, 연면적 1,484㎡)신축, 주차장 조성(55대)

□ 추진사항

❍ (2017. 5.15.) 직원후생복지시설 신축을 위한 계획 수립

❍ (2018.11.15.) 공유재산 관리계획(변경) 승인

❍ (2019.10월) 직원후생복지시설 착공

❍ (2019.10월) 설계 변경 및 시공

❍ (2020. 2월) 완공 예정

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	1,970	1,970
국비
도비
군비	1,970	1,970					3회 추경(250)
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 주차 공간 확충과 부족한 사무공간의 확보를 위해 건축 연면적 확대 필요

❍ 착공 후 시설의 위치 이동 및 건축물 연면적 확대를 위한 설계변경 필요

❍ 2019년 10월 중 문제점 해결을 위해 2019년 11월 시설의 설계변경 후 시공

□ 향후 추진계획

❍ 2019년 11월 중 설계 변경하여 주차 공간 확충과 사무공간 확대를 위한 설계

변경 후 시공