2019년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(문화체육과)

□ 총    평

❍ 일회성 행사가 아닌 상설공연을 기획함으로써 문화와 예술에 대한 접근성을 높여 지역민과 방문객에게 차별있고 특색있는 문화 향유 기회를 제공하였고,  각종 동호회 및 단체에 문화예술 활동 지원과 문화 취약계층을 위한 찾아가는 예술 활동 추진, 문화예술 기반시설 확충으로 문화복지 향상 도모

❍ 우리나라 목화의 발상지인 목면시배유지의 체계적인 정비와 문화재 활용을 통한 관광자원을 개발하고자 ‘산청 목면시배 유지 종합정비 기본계획 수립 용역’을 완료하였으며, 국정과제로 추진 중인 「가야문화권 조사연구 및 정비」사업과 보조를 맞춰 산청 가야사의 보존·정비 및 성격 규명에 필요한 기초자료를 확보하기 위하여 중촌리고분군에 대한 측량 및 정밀실측조사를 실시하였고, 산청 생초고분군의 종합정비계획, 시굴조사, 발굴조사를 추진하고 있음

❍ 생활체육대회 개최 및 유치를 통한 스포츠로 하나되는 유쾌한 지역분위기를 조성하는 한편 엘리트체육 전지훈련 유치로 생활체육과 엘리트체육의 균형있는 발전을 도모함

❍ 공공체육시설 확충 및 유지보수를 통해 군민에게 쾌적한 체육시설을 제공하여 건강증진 및 삶의 질 향상에 이바지하였음

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	7	1	5		1
군수공약사업	5	1	4
주요시책사업	2		1		1

□ 주요성과

❍ 문화예술 기반시설 확충으로 지역문화 활성화 도모

- 기산국악당 교육관 및 부대시설 증축 완료 : 120㎡, 560백만원

- 한국선비문화연구원 생활관 확충(공정율 60%) : 1,317㎡(지상 3층), 3,600백만원

- 도예문화관광 체험장 조성(공정율 50%) : 전시실, 작업실, 체험장 등 330백만원

- 남부도서관 건립사업 설계용역 추진 : 1,200㎡(지상 2층), 3,850백만원

- 덕산문화의집 생활문화센터 별관 건립 생활SOC 공모사업 선정 : 1,000백만원

❍ 2019 문체부선정 상설문화관광 프로그램 운영 : 44회 13,000여명

❍ 도천서원 정비사업(공정율100%) : 방충사업 완료, 홍살문 보수 완료 등124백만원

❍ 전지훈련팀 유치로 지역경제활성화 기여

: 축구, 테니스, 씨름 90팀 2,300명(연인원 30,513명)

❍ 남부 문화체육센터 신축공사(공정율 60%)

: 8,500백만원(내부 배관 및 소방·통신공사 진행 중)

❍ 산청 공설운동장 정비사업(공정율 30%)

: 5,800백만원(우레탄트랙 철거완료, 실시설계용역 완료 및 공사발주 중)

□ 향후 추진계획

❍ ‘19. 12월 : 남부지역 공공도서관 착공 후  ‘20. 9월 개관

❍ ‘20.  1월 : 신명사도 실천유학 문화체험장 타당성 조사 및 기본계획 수립

용역 완료 후 사전행정절차 이행

❍ ‘20.  1월 : 경호강 래프팅시설 공사착공 후 ‘20. 4월 준공

❍ ‘20.  2월 : 남부 문화체육센터 공사 준공 후 ‘20. 4월 개장

❍ ‘19. 11월 : 산청공설운동장 정비 공사 착공 후 ‘20. 2월 준공

구 분	군수공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 박종구)
추진실적	20%	완료예상	2020년 4월

경호강 관광화 사업(래프팅시설, 체육시설)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 865-2번지 일원

❍ 소요예산 : 800백만원(국비 290 군비 510)

❍ 사업내용 : 화장실 1동, 쉼터, 간이족욕장 설치 1식, 체육시설 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 12월 : 2019년 사업예산(3억원) 확보

❍ 2019.  3월 : 화장실 설치를 위한 사전행정절차 이행

❍ 2019.  9월 : 2020년 사업예산(5억원) 확보

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	800	300	500
국비	290	90	200
도비
군비	510	210	300
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 경호강 관광화사업과 연계한 종합발전계획에 의거 사업추진 필요

→ 2018년 경상남도 2단계 지역균형발전사업 선정

→ 산청읍 농촌중심지 활성화사업을 통한 조산공원 주변 체육시설 정비 및        주민 편의시설 확충

❍ 래프팅시설물 설치를 위한 래프팅협회 협의지연

→ 래프팅 시즌 종료 후 래프팅 타운 내 관광객 편의시설 확충

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 11월 : 실시설계용역 시행

❍ 2020.  1월 : 공사착공

❍ 2020.  4월 : 공사준공

구 분	군수공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 박종구)
추진실적	60%	완료예상	2020년 4월

남부 문화체육센터(수영장+작은영화관)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 930-1번지 일원

❍ 소요예산 : 8,500백만원(국비 2,260 도비 1,710 군비 4,530)

❍ 사업내용 : 수영장(25m×4레인), 작은영화관(2개관 98석), 체력단련실, 카페테리아 등

□ 추진사항

❍ 2018. 10월 : 계약심사 등 행정절차 이행 및 사업발주

❍ 2018. 12월 : 공사착공

❍ 2019. 10월 : 골조공사 완료. 내외부 마감작업 중

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	8,500	8,500
국비	2,260	2,260
도비	1,710	1,710
군비	4,530	4,530
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 신안게이트볼장 철거협의 지연에 따른 주차공간 확보 애로

→ 산청군게이트볼협회 신안면분회와의 지속적인 협의를 통한 남부체육공원으로         이전설치. 게이트볼장 이전설치를 위한 실시설계용역 진행 중

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 2월 : 사업 완료

❍ 2020. 3월 : 시운전 및 점검

❍ 2020. 4월 : 개장 및 운영

구 분	군수공약사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 천혜원)
추진실적	10%	완료예상	2020년 6월

남부지역 공공도서관 건립

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019 ~ 2020년(2년간)

❍ 위    치 : 산청군 신안면 하정리 932-1번지 일원

❍ 소요예산 : 3,850백만원(국비 1,600 군비 2,250)

❍ 사업내용 : 공공도서관 1동 건립(연면적 1,200㎡ 지상2층)

□ 추진사항

❍ 2018.  2월 : 산청군 지방 재정투자심사 승인

❍ 2018.  3월 : 2018년 상반기 공공도서관 건립지원사업 사전평가 실시(결과 : 적정)

❍ 2018.  7월 : 공유재산관리계획 의결

❍ 2019.  1월 : 산청군 ↔ 경상남도교육청 도서관 건립운영에 대한 협약체결

❍ 2019.  4월 : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2019. 10월 : 구)신안보건지소 철거공사 시행

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,850	1,800	2,050
국비	1,600	700	900
도비
군비	2,250	1,100	1,150
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 11월 : 설계용역 완료 및 도 계약심사

❍ 2019. 12월 ~ 2020. 6월 : 공사 착수 및 준공

❍ 2020.  9월 : 도서관 개관

구 분	군수공약사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 박종구)
추진실적	0%	완료예상	2020년 6월

생초 체육공원 구역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 101-1번지 일원

❍ 소요예산 : 500백만원(국비 200 군비 300)

❍ 사업내용 : 소규모 겸용 체육시설(풋살장 겸 족구장) 건립 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 9월 ~ 2019. 10월 : 체육시설 부지보상 협의, 관련부서 사업추진 협의

※ 생초면 농촌중심지 활성화사업 내 사업내용 포함 추진 중

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	500		500
국비	200		200
도비
군비	300		300
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 체육시설 설치 대상부지 토지소유자 보상 협의 불가

☞ 체육시설 부지보상 미협의시 인근 농지(농업진흥구역) 매입 후 사업추진

(농업진흥구역 해제 등 사업이행 장기간 소요예상)

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 11월 : 토지소유주 재협의 및 대체부지 확보추진

구 분	군수공약사업	담당부서	문화체육과 문화재담당 (담당자 이창엽)
추진실적	100%	완료예상	2019년 9월

도천서원 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018 ~ 2019

❍ 위    치 : 산청군 신안면 신안리 177번지 일원

❍ 소요예산 : 124백만원

❍ 사업내용 : 기록화 사업, 종합정비 기본계획 수립, 방충제 도포, 홍살문 보수

□ 추진사항

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 기록화 사업 완료

❍ 2018. 7월 : 산청 도천서원 신안사재 종합정비 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2019. 5월 : 방충사업 완료

❍ 2019. 9월 : 홍살문 보수 완료

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	124	124
국비
도비	76	76
군비	48	48
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 해당없음

구 분	주요시책사업	담당부서	문화체육과 체육시설담당 (담당자 박종구)
추진실적	30%	완료예상	2020년 2월

산청 공설운동장 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 산청군 금서면 매촌리 1번지

❍ 소요예산 : 5,800백만원(국비 2,320 군비 3,480)

❍ 사업내용 : 우레탄트랙 및 축구장 인조잔디 교체 1식, 본부석 정비, 조명교체,                  전광판 설치, 실내씨름장 조성, 부대시설 정비 1식

□ 추진사항

❍ 2018.  8월        : 공설운동장 정비사업 조사측량 및 실시설계용역 착수

❍ 2018. 10월 ~ 11월 : 주민공청회 실시(2회)

❍ 2019.  9월        : 실시설계용역 완료

❍ 2019. 10월        : 경상남도 계약심사 완료

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,800	2,620	3,180
국비	2,320	1,210	1,110
도비
군비	3,480	1,410	2,070
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 사업추진 방향 변경에 따른 계획변경승인 및 실시설계용역 추진 지연

☞ 문체부 사업계획 변경승인 및 실시설계 완료

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 11월 : 공사 착공

❍ 2020.  2월 : 공사 준공

구 분	주요시책사업	담당부서	문화체육과 문화예술담당 (담당자 천혜원)
추진실적	5%	완료예상	2023년 12월

신명사도 실천유학 문화체험장 조성사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020 ~ 2023년(4년간)

❍ 위    치 : 산청군 시천면 사리 900-48번지 일원

❍ 소요예산 : 18,000백만원(국비 9,000 도 4,500 군비 4,500)

❍ 사업내용 : 신명사도 실천유학 문화체험장 조성 1식

□ 추진사항

❍ 2018.  4월 : 경남도 남명 선비문화 계승발전 종합계획 세부실행대상사업 선정

❍ 2019.  3월 : 문체부 및 경남도 담당부서 협의

❍ 2019.  4월 : 밀양시 시군 협력사업 검토 협의

❍ 2019. 10월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 착수

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	18,000		200	7,000	5,400	5,400
국비	9,000			3,600	2,700	2,700
도비	4,500			1,800	1,350	1,350
군비	4,500		200	1,600	1,350	1,350
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 문체부 협의결과 단일사업으로 추진시 예산확보에 어려움이 있어 시군간 연계협력사업 또는 광역개발사업으로 추진하는 방안 등 다각적 검토

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 1월 : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료

❍ 2020. 1월 : 경남도 지방재정투자심사 의뢰

❍ 2020. 4월 : 공유재산관리계획 의결

❍ 2020. 7월 : 군 계획시설 변경인가 및 공원조성계획 변경 용역 시행