2019년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(관광진흥과)

□ 총  평

❍ "곽종석생가 정비사업“을 비롯한 공약사업 7건, 시책사업 1건에 대해서는 정상적으로 추진되고 있으나,

❍ 시책사업인“정광들 워터파크 조성사업”은 국도비 예산확보, 문화재발굴, 농업진흥지역해제, 민간투자자부재 등으로 장기검토가 필요함.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	8	-	6	-	-
군수공약사업	7	1	6	-	-
주요시책사업	1	-		-	1

□ 주요성과

❍“곽종석생가 건립사업”은 특교 10억원, 군비 10억원, 특교(공모)1억원, 도비(공모)2억원을 확보하였으며, 부족분은 2020년 본예산(군비) 확보예정이며 현재는 본 사업을 위한 실시설계 중에 있음.

❍“남사예담촌 재정비사업”은 균특회계 예산으로 한옥담장 및 노후한옥정비사업은 완료하였으며, 주변 환경정비를 위해 부지매입 4필지는 완료하였음.

❍“황매산 관광 및 경제활성화 사업”은 국도비 및 군비예산 25억원을 확보하여 진행 중에 있으며 2020년 2월 준공예정임.

❍“삼장체육공원 확충”사업 중 시설개보수사업은 완료하였으며, 샤워실 신축공사는 2019년 12월말 완료예정임.

❍“생초국제조각공원 구역확장”사업 중 고분군 주변의 잡목제거는 완료하였으며, 2019년 제2회 추경예산이 확보되어 꽃잔디 및 관상목 식재를 추진하고 있음.

❍“문익점 생가건립사업”은 사업대상지가 일부 변경되어 공유재산관리계획(투자심사)변경승인을 받았으며, 현재 사업대상부지 4필지에 대해 매입 및 협의 완료하였음(2020년 시도자율편성 8억원 확보)

❍“단계한옥마을 관광자원개발사업”은 재정투자심사 승인을 받았으며, 2020년 시도자율편성 8억원을 확보하였음.

□ 향후 추진계획

❍ 공약사업(국도비 확보 비대상) 2건에 대해서는 2019년 추경 및 2020년 본예산에  군비확보 예정이며, 국도비 사업 4건은 2019년 및 2020년도에 예산을 확보 완료하고 사업추진 중에 있음.

- 삼장체육공원확충(군비) : 2019년 하반기 완료예정

- 생초국제조각공원 구역확장(군비) : 2020년 상반기 완료예정

- 곽종석 생가정비사업(국도비) : 2020년 하반기 준공예정

- 남사예담촌재정비사업(군비) : 2020년 상반기 완료예정

- 황매산 관광 및 경제활성화사업(국도비) : 2020년 하반기 완료예정

- 문익점생가건립사업(국도비) : 2022년 상반기 완료 예정

- 단계한옥마을 관광자원개발사업(국도비) : 2022년 하반기 완료예정

❍ 시책사업인 정광들 워터파크 조성사업(미확정)은 장기계획으로 추진예정에 있음.

구 분	군수공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김성훈)
추진실적	5%	완료예상	2020년 12월

곽종석 생가 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2020년 12월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 1340번지외 1필지

❍ 소요예산 : 2,700백만원(특교 1,100, 도비 200, 군비 1,400)

❍ 사업내용 : 체험관 및 생가건립 360㎡, 주차장 및 테마공원 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2019. 02월 : 지방재정투자심사 승인

❍ 2019. 03월 : 공유재산관리계획 승인

❍ 2019. 06월 : 부지매입완료(5,406㎡)

❍ 2019. 04월 ~ 11월 : 실시설계 중(건축, 토목, 조경 등)

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,700	2,300	400
국비	1,100	1,100	-
도비	200	200	-
군비	1,400	1,000	400

□ 문제점 및 대책

❍ 문화재 보존영향검토대상 구역으로 문화재 현상변경 허가 필요

- 역사인물에 대한 배경 설명 등 문화재위원 사전 협의 등

❍ 예산부족 : 2020년 본예산 및 2020년 추경예산 확보 예정

□ 향후 추진계획

❍ 2020.01월 ~ 06월 : 본예산 및 추경예산

❍ 2019.11월 : 실시설계 완료(건축허가 및 문화재현상변경 허가 신청 등)

❍ 2020.01월 ~12월 : 공사착공 및 준공

구 분	군수공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김성훈)
추진실적	100%	완료예상	2020년 6월

남사예담촌 재정비

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 01월 ~ 2020.6월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 남사리(사월리) 남사예담촌 일원

❍ 소요예산 : 2,800백만원

❍ 사업내용 : 토석담장 복원(L=700m), 노후한옥정비(47동), 기산국악당주변 및 남사예담촌 부지매입 4필지

□ 추진사항

❍ 2019.06월 : 노후한옥정비 47동 완료

❍ 2019.10월 : 토석담장(L=700m) 복원정비 완료,

❍ 2019.10월 : 남사예담촌 부지매입 4필지 완료(축사,판넬건물 등)

※ 군수님 공약사항은 완료하였지만 추가 재정비사업은 계속진행 예정

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년 (추가)	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,802	2,802	400
국비	833	833	-
도비	248	248	-
군비	1,721	1,721	400

□ 문제점 및 대책

❍ 부지 추가매입 애로 : 남사마을 추진위와 공동으로 보상협의 진행

(주차장 및 기산국악당 주변 노후주택)

□ 향후 추진계획

❍ 2020.01월 : 2020년 본예산 확보(군비 4억원)

❍ 2020.06월 : 환경정비를 부지 추가 매입

구 분	군수공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김성훈)
추진실적	60%	완료예상	2020년 6월

황매산 관광 및 경제활성화 사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 01월 ~ 2020.03월

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 1-10번지 일원

❍ 소요예산 : 25억원

❍ 사업내용 : 오토캠핑장, 관리사, 오수 및 상하수도, 안전시설 등

□ 추진사항

❍ 2018. 07월 : 실시설계완료

❍ 2019. 02월 : 각종인허가 완료

❍ 2019. 04월 ~ 2020. 03월 : 공사착공 및 준공

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,500	2,500	-
국비	1,250	1,250	-
도비	375	375	-
군비	875	875	-
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 03월 : 준공

구 분	군수공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김동준)
추진실적	80%	완료예상	2019년 12월

삼장체육공원 확충사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019.01월 ~2019.12월

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 덕교리 830번지 일원

❍ 소요예산 : 2.9억원

❍ 사업내용 : 편의시설(샤워장) 설치, 다목적캠핑장 데크설치, 시설개보수 등

□ 추진사항

❍ 2018. 12월 : 삼장면 체육회 및 마을주민 의견 청취

❍ 2019. 02월 ~ 08월 : 군계획시설 변경

❍ 2019. 01월 ~ 09월 : 실시설계 용역

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	290	290	-
국비	-	-	-
도비	-	-	-
군비	290	290	-
기타	-	-	-

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 2019.12월 : 건축(샤워장) 준공

※ 2020. 01월~06월 : 다목적캠핑장(텐트설치구간)데크 설치(52백만원) 예산확보

구 분	군수공약사업	담당부서	관광진흥과 관광시설담당 (담당자 이종인 )
추진실적	90%	완료예상	2020년 6월

생초국제조각공원 구역확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018.01월 ~ 2020. 6월

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 생초국제조각공원 일원

❍ 소요예산 : 2억원

❍ 사업내용 : 고분군 주변 잡목제거 및 꽃잔디 등 수목 식재(15,000㎡)

조각공원내 편의시설 설치 : 보안등, 그늘막, 안내판 등

□ 추진사항

❍ 꽃잔디 식재 : 제방사면(1,400㎡), 조각공원(5,000㎡)

❍ 고분군 주변 잡목제거 : 10,000㎡

❍ 조각공원내 편의시설 설치 : 보안등(5개), 그늘막(7개), 안내판 등

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	218	168	50	-
국비	-	-	-	-
도비	-	-	-	-
군비	218	168	50	-
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 생초국제조각공원 상부 조성예정지(10,000㎡)는 문화재 보존영향 검토대상 구역으로 장비 진입 불가로 꽃잔디 등 수목식재를 위한 잡초제거, 정지작업 등 수작업에 따른 예산과 인력, 사업기간이 장기간 소요

⇒ 2020년 본예산 반영 및 사업시행 필요

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 12월 : 본예산 확보

❍ 2020. 02월 ~ 6월 : 고분군 주변 꽃잔디 보식등(10,000㎡)

구 분	군수공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김성훈)
추진실적	0%	완료예상	2022년 12월

문익점 생가건립사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019.03월~ 2022.12월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 477-1번지

❍ 소요예산 : 3,965백만원

❍ 사업내용 : 목화체험관(문익점생가포함), 목화테마거리, 목화프로그램 등

□ 추진사항

❍ 2018. 07월 : 사업타당성 및 기본계획

❍ 2018. 11월 : 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 승인

❍ 2019. 10월 : 2020년 시도자율편성 예산편성

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,965	865	1,200	1,000	900
국비	1,350	-	400	500	450
도비	405	-	120	150	135
군비	2,210	865	680	350	315
기타		-

□ 문제점 및 대책

❍ 부지매입 협의 애로 : 지속적 협의를 통한 사업의 필요성 설명

❍ 문화재보호구역으로 현상변경허가 장기간 소요 : 사업당위성 설명

❍ 시도자율편성 확보 : 2021년 계속사업으로 신청예정

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 03월 : 부지매입(4억원)협의완료 추경편성

❍ 2020. 01월 ~ 06월 : 실시계획

❍ 2020.06월 ~ 2020.12월 : 사업착공 및 사업준공

구 분	군수공약사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 김성훈)
추진실적	0%	완료예상	2022년 12월

단계한옥마을 관광자원 개발사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020.01월 ~ 2022.12월

❍ 위    치 : 산청군 신등면 단계리 일원

❍ 소요예산 : 3,000백만원

❍ 사업내용 : 토석담장 복원(L=300m), 마을안길정비, 주차장확보 등

(한옥홍보관 건립 등)

□ 추진사항

❍ 2019.02월 : 단계한옥마을 기본계획 완료

❍ 2019.02월 : 지방재정투자심사 승인

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,000	-	800	1,200	1,000	-
국비	1,500	-	400	600	500	-
도비	450	-	120	180	150	-
군비	1,050	-	280	420	350	-
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 문화재보호구역으로 현상변경허가 장기간 소요 : 사업당위성 설명

❍ 시도자율편성 확보 : 2021년 계속사업으로 신청예정

※ 대상주변(자체사업) 부지매입 애로 : 지속적 협의를 통한 사업의 필요성 설명

□ 향후 추진계획

❍ 2020. 03월 : 부지매입(3억원)협의완료시 추경 편성

❍ 2020. 01월 ~ 06월 : 실시계획

❍ 2020.06월 ~2020.12월 : 사업착공 및 사업준공

구 분	주요시책사업	담당부서	관광진흥과 관광개발담당 (담당자 최동민)
추진실적	0%	완료예상	미정

정광들 워터파크 조성사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021.01월 ~ 2023.12월

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 옥산리 일원

❍ 소요예산 : 10,000백만원(민간투자 사업비 별도)

❍ 사업내용 : 워터파크 1식(경관조명, 전망대, 밀리터리파크 등)

□ 추진사항

❍ 2019.2.8 : 정광들 발전방안 회의

※ 각 부서별 업무분장

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구 분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	10,000	-	-	-	5,000	5,000
국비	2,500	-	-	-	-	2,500	문화재발굴
도비	750	-	-	-	-	750	문화재발굴
군비	6,750	-	-	-	5,000	1,750	부 지 매 입
기타

※ 민간투자자 투자사업비 별도

□ 문제점 및 대책

❍ 행정절차상 문제점 및 대책

- 농업진흥지역해제를 위한 군계획시설결정이 필요함.(워터파크는 군계획시설이 아님)

⇒  대상지 주변 군계획시설(채육시설,공원 등)결정 후 잔여지 여건변화에 따른 농업진흥지역해제

- 상대정화구역(중·고등학교 연접)으로 위락시설 설치애로(200m제한)

⇒ 관련법 검토 필요(설치가능 도입시설 검토 등)

- 민간투자자 부재(고비용)

⇒ 민간사업자의 행정절차어려움 해결을 위해 문화재발굴, 농업진흥지역해제, 상대정화구역내 설치 가능한 도입시설 검토 후 민간투자 유치 예정.

- 문화재발굴에 따른 고비용 예산 필요

⇒ 관광자원개발사업 등 적합한 목적사업 확정 후 국도비 확보(민간투자자 포함)예정

□ 향후 추진계획

❍ 약초특구해제 : 해당부서

❍ 문화재발굴 협의 : 해당부서

❍ 군계획시설 결정(체육시설,공원) 및 농업진흥지역 해제 : 해당부서

❍ 부지매입에 따른 행정절차 진행

❍ 민간투자자 모집 및 투자협약 체결 등