2019년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(산림녹지과)

□ 총  평

❍ 동의보감촌과 연계한 치유의 숲 조성을 통하여 대국민 산림치유서비스 제공 기대

❍ 곶감현대화사업을 통하여 위생적이고 질좋은 명품곶감 생산으로 농가소득향상에 기여하였고, 2020년에는 농림사업으로 지속적인 곶감명품화 사업추진 예정

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4	-	4	-	-
군수공약사업	2	-	2	-	-
주요시책사업	2	-	2	-	-

□ 주요성과

❍ 치유의 숲 조성사업 추진을 통한 산림치유시설 확보

- 치유의 숲 진입로 및 주차장 설치

- 치유센터 건축 공사 기반 및 구조물 공사 완료

❍ 대한민국 대표 명품 곶감으로 자리매김

- 산청고종시 3년 연속 대한민국 대표과일 선정

- 4년 연속 대한민국“대표브랜드”및“축제콘텐츠”대상 수상

□ 향후 추진계획

❍ 치유의 숲 조성 후 산림치유프로그램 개설 등으로 체계적이고 효율적인

운영 방안 모색

❍ 산청곶감 산업화를 위하여 전문기관에 사업 컨설팅을 의뢰하여 생산, 유통 등에 대한 문제점을 개선하고 6차산업으로 발전할 수 있는 방향 모색

❍ 산약초단지 조성사업은 동의보감촌과 산림소득공모사업을 통한 대규모 단지 조성으로 농가소득증대

❍ 선도산림경영단지 조성사업의 산림소득작물 식재

- 양봉농가의 소득증대를 위한 밀원수림 조성 확대

- 단기 소득작물(산마늘, 음나무 등) 재배단지 조성

구 분	군수공약사업	담당부서	산림녹지과 산촌소득담당 (담당자 민병순)
추진실적	90%	완료예상	2020년 12월

산청곶감 명품화사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2019년

❍ 위    치 : 산청군 관내

❍ 소요예산 : 2,800백만원(균특 1,400  도비 168  군비 392  자부담 840)

❍ 사업내용

- 청정건조시설 신설‧보완 74개소

- 저장시설 15개소

- 제습기 등 기타장비 구입 지원 60개소

- 홍보‧마케팅, 재배생산기술교육, 곶감연구개발용역 각 1식 등

□ 추진사항

❍ 2019. 1월 ~ 2월 : 2018년 이월 대상자 사업 추진 독려

❍ 2019. 1월 ~ 4월 : 2019년 사업 대상자 선정

❍ 2019. 11월 ~ 12월 : 2018년~2019년 사업마무리 및 정산

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	4,452	2,800	1,652
국비	1,768	1,400	368
도비	318	168	150
군비	738	392	346
자부담	1,628	840	788

□ 문제점 및 대책

❍ 건축물 부기등기제도, e나라도움 보조금 집행 등 보조사업 관리강화에 따른

고령자 보조사업 추진 애로

❍ 사업 대상자 포기에 따른 대상자 재선정으로 사업 지연

□ 향후 추진계획

❍ 산청곶감현대화사업은 2019년 사업이 완료되어 2020년 사업비는 농림사업으로       확보하여 산청곶감 명품화 사업 추진

구 분	군수공약사업	담당부서	산림녹지과(산촌소득담당) (담당자 이주환)
추진실적	10%	완료예상	2022년 12월

산약초 단지 조성사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2022년

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 동의보감촌 일원

❍ 소요예산 : 60,000천원

❍ 사업내용 : 숲가꾸기, 종자구입 및 파종, 시비 등

□ 추진사항

❍ 2018. 9월~12월 : 조성 예정지 숲가꾸기 실시 및 산지정리

❍ 2019. 1월~ 2월 : 동의보감촌 외곽순환도로 개설계획으로 조성사업 중단

❍ 2019. 3월~11월 : 산약초단지 조성 대상지 변경 내부검토

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	60	30	10	10	10
국비
도비
군비	60	30	10	10	10
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 산약초단지 조성 예정지에 동의보감촌 외곽순환도로 개설로 인한 대상지 변경 필요

⇒ 접근성이 양호하며 연차적으로 조성가능한 외곽순환도로 및 힐링교 주변 산약초        단지 조성 예정(한방항노화실 협의)

□ 향후 추진계획

❍ 기 확보예산 명시이월하여 2020년 대상지 확정 후 사업 시행

❍ 2020년 추경예산을 통해 예산확보 예정

❍ 2020년 산림소득 공모사업 선정과 연계하여 사업 추진(3개농가, 35ha)

구 분	주요시책사업	담당부서	산림녹지과 녹지조성담당 (담당자 유보현)
추진실적	70%	완료예상	2020년 12월

치유의 숲 조성사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016년 ~ 2020년

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 산79-2번지 외3필지

❍ 소요예산 : 5,000백만원(국2,500  도750  군1,750)

❍ 사업내용 : 치유센터, 치유숲길, 치유욕장, 부대시설 등

□ 추진사항

❍ 2016. 8. 30 : 치유의 숲 실시설계 완료

❍ 2018. 9. 27 : 치유의 숲 조성공사(1차분) 준공

❍ 2019. 8.  8 : 치유의 숲 조성공사(2차분) 준공

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	5,000	4,064	936
국비	2,500	2,032	468
도비	750	609.4	140.4
군비	1,750	1,422.4	327.6
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 12. 31. : 치유의 숲 조성공사(3차분) 준공

❍ 2019. 12. 31. : 치유의 숲 조성사업 전기,통신,소방공사 준공

❍ 2020. 10월 : 치유의 숲 조성사업(4차분) 준공

❍ 2021. 10월 : 치유의 숲 개장

구 분	주요시책사업	담당부서	산림녹지과 산지관리담당 (담당자 권도형)
추진실적	65%	완료예상	2026년 12월

선도산림경영단지 조성 사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2017년 ~ 2026년(10년간)

❍ 위    치 : 산청읍 모고리 산10번지 외 294필지

❍ 소요예산 : 140억(1년차 5억,2년차부터 매년 15억)

❍ 사업내용 : 1,524ha(조림, 숲가꾸기, 임도, 소득사업 등)

□ 추진사항

연도별	예 산 (백만원)	조 림	숲가꾸기	풀베기	임 도	임도 구조개량	기타 (조림예정지정리)
2017	500	-	-	-	0.52km	1.03km	계획수립
2018	1,500	13ha	33.5ha	70ha	3.4km	-	-
2019	1,500	32ha	30ha	86ha	1.7km	1km	8ha

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	14,000	3,500	1,500	1,500	1,500	6,000
국비	9,800	2,450	1,050	1,050	1,050	4,200
도비	1,260	315	135	135	135	540
군비	2,940	735	315	315	315	1,260
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 단기 성과 저조로 산주의 참여와 관심부족

❍ 단기소득작물 재배로 주민소득증대 기여

□ 향후 추진계획

❍ 밀원수(헛개, 음나무) 및 단기소득작물 식재 확대