2019년 하반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도과)

□ 총    평

❍ 소규모수도시설개량 및 지방상수도‧공공하수도 수혜지역 확장을 통하여 안정적이고 깨끗한 상수원 공급과 생활오수를 적정 처리하여 수질오염을 예방함으로서 주민 불편 해소, 안정적인 수돗물 공급으로 주민복지 증진에 기여

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4		4
군수공약사업	3		3
주요시책사업	1		1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 관내 수도 보급률 98.3%를 목표로 수도정비기본계획(변경)을 환경부 승인 득함에 따라  지방상수도 확장사업 추진 및 필요 재원 확보를 위한 근거 마련하고, 지역주민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하여 행정 신뢰도 향상됨.

❍ 관내 하수처리구역 확장 보급률 92.1%를 목표로 하수도정비기본계획(변경)을 수립하여 환경부 승인을 득함에 따라 지방 공공하수처리구역 확장 사업 추진 및 필요 재원 확보를 위한 근거 마련으로 공중위생 및 공공수역의 수질보전이 향상됨.

□ 반    성

❍ 상하수도정비기본계획(변경) 수립 및 환경부 승인 절차 이행으로 그간 지방상하수도 확장사업이 지연되었으나, 2019년 2월 승인 완료됨에 따라 사업 조속 추진하여 지방상수도 및 공공하수도 확장 공급에 차질이 없도록 조치함.

□ 향후 추진계획

❍ 지방상수도 확장을 위한 미확보 또는 부족 재원 확보를 위해 경남도 및 중앙부처와 지속적인 협의로 예산 확보 노력

구 분	군수공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 민치식)
추진실적	15%	완료예상	2022년 12월

지방상수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 46,224백만원(국 8,004, 도 24,352, 군 13,868)

❍ 사업내용 : 산청, 단성, 시천 급수구역 확장

- 정수장 증설(단성, 시천), 배수지 설치(오부, 삼장)

- 관로매설 120㎞, 가압장 및 감압변 설치 1식

□ 추진사항

❍ 2017. 05월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 착수

❍ 2018. 11월 : 시천 급수구역 확장사업 부분 준공(삼장면 신촌 ~ 대포)

❍ 2019. 02월 : 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립

❍ 2019. 05월 : 단성취수장(집수매거) 하천점용 등 인·허가 및 공사 착공

❍ 2019. 06월 : 2020년 산청, 단성, 시천 급수구역 예산 신청(균특회계)

❍ 2019. 10월 : 시천급수구역(삼장면 대포 ~ 홍계) 총사업비 변경 승인

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	46,224	11,437	6,143	20,642	8,002
국비	8,004	8,004	0	0	0
도비	24,352	0	4,300	14,450	5,602
군비	13,868	3,433	1,843	6,192	2,400
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 수도정비기본계획(변경) 수립 지연으로 지방상수도 확장사업이 다소 지연되었으나, 2019년 2월 환경부 최종 승인 완료하여, 수도정비기본계획에 의거 급수 구역별 예산 확보 및 공사 조속 추진토록 조치

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 10월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 준공

❍ 2019. 11월 : 산청 및 단성 급수구역 인·허가 및 공사 착공

구 분	군수공약사업	담당부서	상하수도과 하수도담당 (담당자 이해경)
추진실적	5%	완료예상	2022년 3월

지방하수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 산청읍 모고리, 차황면 상법리

❍ 사 업 비 : 총 12,416백만원(국비 8,692, 지방비 3,724)

- 모고지구 : 7,991백만원(국비 5,594, 지방비 2,397)

- 상법지구 : 4,425백만원(국비 3,098, 지방비 1,327)

❍ 사업내용

- 모고지구 : 하수관로 8.48km, 배수설비 287가구(558명), 맨홀펌프장 6개소

- 상법지구 : 하수처리시설 70톤/일, 하수관로 3.47km, 배수설비 145가구(269명)

□ 추진사항

❍ 2018.  7월 : 실시설계용역 착수(상법지구)

❍ 2018. 11월 : 실시설계용역 착수(모고지구)

❍ 2019.  1월 : 2020년 하수도분야 예산신청

❍ 2019.  6월 : 실시설계용역 준공(상법지구,모고지구)

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	12,416		1,028	5,694	5,694
국비	8,692		720	3,986	3,986
도비	265		47	109	109
군비	1,064		261	402	401
기타	2,395			1,197	1,198

□ 문제점 및 대책

❍ 해당없음

□ 향후 추진계획

❍ 2020.  1월 : 재원협의 및 설치인가

❍ 2020.  3월 : 착공

구 분	군수공약사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 민치식)
추진실적	86%	완료예상	2019년 12월

지방상수도 인입공사 조기 마무리(생비량면)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2019. 12월

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 소요예산 : 14,951백만원(국 9,766, 군 5,185)

❍ 사업내용 : 생비량면 지방상수도 급수구역 확장

- 배수지(300톤) 1식, 관로매설 77.1㎞, 관로매설 구간 포장 1식

- 가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 착공(총괄분)

❍ 2018. 10월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 준공(1,2,3차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 기성(4차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 포기(시공사 영일개발)

❍ 2019. 05월 ~ 09월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 타절 정산

❍ 2019. 10월 : 생비량면 지방상수도 인입공사(잔여분) 착공

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	14,951	14,951
국비	9,766	9,766
도비	0	0
군비	5,185	5,185
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 단성급수구역 용수원 부족과 생비량지구 공사 타절로 인한 지연으로 지방상수도 공급에 다소 어려움이 예상됨에 따라 단성 취ㆍ정수장 증설 및 생비량지구 공사 조속 완료하여 지방상수도 적기 공급토록 조치

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 12월 : 생비량면 지방상수도 시운전 및 공사 준공

※ 총 833가구 중 553가구 완료, 280가구 공사중

구 분	주요시책사업	담당부서	상하수도과 상수도담당 (담당자 민치식)
추진실적	69%	완료예상	2021년 12월

노후 상수관망 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016. 10월 ~ 2021. 12월

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 25,097백만원(국 12,548, 지 12,549)

❍ 사업내용 : 지방상수도 노후 관망정비 및 현대화 사업

- 관망정비 L=35.0km, 누수탐사·정비 L=557km

- 블록시스템(중블록 5개소, 소블록 16개소) 및 유지관리시스템 구축 등

□ 추진사항

❍ 2016. 10월 : 위·수탁 협약체결(산청군-한국환경공단)

❍ 2017. 09월 : 기본설계 용역 준공

❍ 2017. 11월 : 실시설계 및 관망관리 용역 착공

❍ 2018. 06월 : 블록시스템 구축공사 착공

❍ 2018. 12월 : 유지관리시스템 구축공사 착공

□ 사업예산                                                 (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘20년	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	25,097	12,688	7,530	4,879
국비	12,548	6,344	3,765	2,439
도비	159	159	0	0
군비	12,390	6,185	3,765	2,440
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 급수구역 블록 및 시설 현대화로 수도시설 관리 기반을 마련하였으나, 재정상 문제로 상수 관로 노후화 진행에 따른 대처 부족으로 관로 노후화가 누적되어 수도 경영의 악순환이 반복되는 실정으로, 노후 관로 개선을 위한 정부 정책 반영과 지속적인 사업 발굴 및 예산 확보 노력 필요

※ 관내 전체 노후관로(11년이상) : 128km(사업비 약 243억원)

□ 향후 추진계획

❍ 2019. 10월 : 블록시스템 구축공사 준공 및 관망정비공사 착공

❍ 2021. 12월 : 시설공사 준공