2021년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(한방항노화과)

□ 총    평

❍ 2023 산청세계전통의약항노화엑스포 개최를 위해 국제행사 타당성 조사 용역 중으로 노후 된 동의보감촌 시설에 대한 리뉴얼과 시설개선으로  성공적인 엑스포 추진에 만전을 기하고 있으며,

❍ 코로나19 여파 속에서 국내 유일 산업형 온라인축제 모델 제시 및 온∙오프라인 콘텐츠 병행으로 8백만 조회, 제20회 산청한방약초축제 온라인 전환 성공 개최

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)						비 고
	계	완료	이행후 계속추진	정상 추진	장기 추진	기타
계	5			5
군수공약사업	2			2
주요시책사업	3			3

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 엑스포 국제행사 심사대상 선정(기획재정부)

❍ 엑스포 국제행사 타당성 조사 용역(대외경제정책연구원)

❍ 거함산 항노화 테마파크 힐링교 가설공사 설치(출렁다리)

❍ 동의보감문 조성 완료

❍ 동의보감촌 케이블카 기본 및 실시설계 용역 추진 및 환경영향평가 실시

□ 반    성

❍ 중앙부처 및 경남도 등 상부 기관의 투·융자 심사, 사업계획 승인 등이

수반되는 사업이 많아 사업추진이 지연됨

❍ 지속적인 업무협의로 공약사업 및 시책사업 분야별 효율적 사업 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12월 : 공약사업 추진진도 55% 진행
❍ 2021. 12월 : 시책사업 추진진도 75% 진행

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과(관리운영담당)
추진진도(%)	50%(정상추진)

45

2023 산청세계전통의약항노화엑스포 개최

준비

□ 사업개요

❍ 위    치 : 2023. 9. 15. ~ 2023. 10. 19.(35일간)

❍ 사 업 비 : 동의보감촌 및 한방의료클러스터 일원

❍ 사 업 량 : 150억원(국비 45, 도비 30, 군비 30, 수익/기타 45)

❍ 사업내용 : 3개 부문(전시,이벤트,컨벤션) 10개 유형 65개 프로그램 운영

□ 추진사항

❍ 2019. 12월~2020. 7월 : 기본계획 및 타당성조사 용역

❍ 2020.  9월           : 국제행사 개최계획서 제출(산청군→경남도)

❍ 2020. 12월          : 국제행사 개최계획서 제출(경남도‧산청군→보건복지부)

❍ 2020. 12월           : 보건복지부 검토의견서 등 제출(보건복지부→기획재정부)

❍ 2021.  2월           : 국제행사 심사대상 선정(기획재정부)

❍ 2021.  4월~7월       : 국제행사 타당성 조사 용역(대외경제정책연구원)

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	15,000			2,900	12,100
국비	4,500			700	3,800
도비	3,000			600	2,400
군비	3,000			1,500	1,500
기타	4,500			100	4,400

□ 문제점 및 대책

❍ 국제행사 승인 및 엑스포의 차질 없는 준비를 위한 전담부서 필요

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 7월    : 국제행사 심사 및 승인

❍ 2021. 7월    : 엑스포 전담조직 신설

❍ 2021. 하반기 : 행사운영 재단법인 설립 검토(산청군,경남도)

❍ 2022. 1월    : 행사준비(엑스포운영조직위 출범)

❍ 2023. 9월    : 엑스포개최(엑스포운영조직위)

구 분	공약사업
담당부서	한방항노화과 (시설사업·휴양림담당)
추진진도(%)	60%(정상추진)

46

동의보감촌 및 산청한방자연휴양림 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 10월 ~ 2026. 12월

❍ 위    치 : 산청군 금서면 특리 동의보감촌 일원

❍ 사 업 비 : 17,000백만원(군비 17,000) 정도

❍ 사업내용

- 동의보감촌 확장 부지조성을 위한 지구단위계획구역 지정

- 휴양림 내 산책로, 탐방로, 야외쉼터, 약용작물, 특화단지 조성을 위한 휴양림 확대 지정

□ 추진사항

❍ 2019. 7월 ~ 2020. 6월 : 관광지 조성 계획 변경 및 승인(연장) 협의

❍ 2019. 8월            : 한방자연휴양림 지적구역 변경 진행(산림청)

❍ 2019. 9월 ~ 2021. 6월 : 특리지구 개발사업 토지매입(38필지 중 34필지 보상완료)

❍ 2020. 4월             : 휴양림 조성계획 진행(경상남도 승인)

❍ 2020. 4월             : 한방자연휴양림 지정구역 변경 승인(산림청)

❍ 2020. 7월             : 특리지구 군관리계획결정 산청군계획위원회 자문

❍ 2021. 1월             : 특리지구 지구단위계획 결정 입안

❍ 2021. 1월 ~ 2021. 5월 : 주민의견청취 및 관계부서협의

❍ 2021. 2월             : 특리지구 개발사업 실시설계용역 시행

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	17,000	5,209	3,400	6,000	2,391
국비
도비
군비	17,000	5,209	3,400	6,000	2,391
기타

□ 향후 추진계획

❍ 2021.  6월 : 산청군공동위원회 심의 및 지형도면 고시

❍ 2021.  7월 : 산청군 관리계획 결정 및 지형도면 고시

❍ 2021.  9월 : 특리지구 개발사업 실시계획 인가 고시

구 분	시책사업
담당부서	한방항노화과(휴양림담당)
추진진도(%)	10%(정상추진)

47

동의보감촌 케이블카 설치

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 1월 ~ 2023. 8월

❍ 위    치 : 동의보감촌 ~ 왕산

❍ 사 업 량 : 삭도 L=1.8km(편도)

❍ 사 업 비 : 35,000백만원 정도

❍ 사업내용

- 상ㆍ중간ㆍ하부 정류장 각 1개소

- 케이블(로프) 시설 : L=1.87Km, 곤돌라(캐빈) : 10인승 40대

□ 추진사항

❍ 2018. 1월  ~  2019. 5월 : 타당성검토 용역 완료

❍ 2019. 11월             : 재정투사심사(자체심사) 승인

❍ 2020. 5월              : 공유재산관리계획안 지방의회 승인

❍ 2020. 5월              : 동의보감촌 케이블카 설치를 위한 주민설명회

❍ 2020. 10월             : 군관리계획 결정(궤도)

❍ 2020. 11월            : 재정투자심사(중앙) 조건부 승인(실시계획인가 전 재심사)

❍ 2021. 3월 ~ 2022. 2월  : 환경영향평가법에 따른 평가실시

□ 문제점 및 대책

❍ 삭도 및 정류장 설치 소요예산 확보 어려움

⇒ 중앙부처 및 경남도 재정지원 요청

❍ 환경영향평가 전환에 따른 협의 기간 연장으로 당초 일정대비 다소 지연

⇒ 식생조사기간 변경(봄․여름) 및 협의기간 최대한 단축

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 2월 ~ 2022. 2월 : 실시계획 및 행정절차(궤도사업허가, 계약 등)

❍ 2022. 3월 ~ 2023. 8월 : 착공 및 준공

구 분	시책사업
담당부서	한항항노화과(한방항노화담당)
추진진도(%)	60%(정상추진)

48

제21회 산청한방약초축제 성공 개최

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 9. 17. ~ 9. 27. (11일간)

❍ 위    치 : 산청IC 축제광장 일원(부행사장: 동의보감촌)

❍ 소요예산 : 2,341백만원(국 30.3, 도 110, 군 2,200.7)

❍ 사업내용 : 개막 및 제전행사, 판매행사(청정골장터), 문화예술공연,

연계행사, 경연행사, 축제홍보 등

□ 추진사항

❍ 2020. 9. 7. ~  9. 27. : 2020년 온라인 산청한방약초축제 개최

❍ 2021. 2. 5. ~  3. 12. : 제21회 축제 포스터 공모전 시행

❍ 2021. 3. 19.         : 산청청년 축제기획단 모집

❍ 2021. 5. 18. ~ 5. 20. : 제1회 한방약초축제위원회 총회 개최

❍ 2021. 5. 20. ~ 5. 22. : 경남관광박람회 축제 홍보 추진

❍ 2021. 6.  2.         : 산청청년 축제기획단 아이디어 접수 및 간담회 개최

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	27,011	19,272	2,341	2,699	2,699
국비	2,215.4	2,154.8	30.3	30.3
도비	1,630	1,410	110	110
군비	22,241.6	14,783.2	2,200.7	2,558.7	2,699
기타	924	924

□ 문제점 및 대책

❍ 코로나19 사태 추이에 따른 축제 개최 방법 다각적 검토 필요

❍ 임원회의, 총회 등 다각적인 검토를 거쳐 축제 개최 여부 결정

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 3월 ~ 10월 : 축제 홍보․마케팅

❍ 2021. 6월 ~  7월 : 축제 기본계획 및 실행계획 수립

❍ 2021. 7월        : 축제 대행용역사 선정

❍ 2021. 7월 ~  9월 : 축제장 기반정비 및 시설물 설치

❍ 2021. 9월 ~ 10월 : 제21회 산청한방약초축제 운영

구 분	시책사업
담당부서	한방항노화과(한방진흥담당)
추진진도(%)	30%(정상추진)

49

한방웰니스지원센터 조성

□ 사업개요

❍ 위    치 : 금서면 특리 1300-46 일원

❍ 사 업 비 : 금2,100백만원

❍ 사 업 량 : 건물 증축 1식(건축면적 341.8㎡, 연면적 623.8㎡)

❍ 사업내용 : 한방웰니스지원센터 증축(3층)

□ 추진사항

❍ 2020. 10월      : 한방웰니스지원센터 조성공사 기본 및 실시설계 용역 시행

❍ 2021. 2월    : 한방웰니스지원센터 조성공사 지반조사 용역 시행

❍ 2021. 4월 ~ 5월 : 한방웰니스지원센터 기본설계 검토(층수, 지붕형태 등)

❍ 2019. 5월 ~ 7월 : 한방웰니스지원센터 실시설계 진행 및 완료

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,100	2,100
국비	1,470	1,470
도비	189	189
군비	441	441
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 기본 및 실시설계 완료 후 경남도와 협의(시행계획 반영 등)하여 사업추진

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 8월 ~ 9월 : 계약심사 및 공사착공 예정