2021년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(관광진흥과)

□ 총  평

❍ "곽종석 생가 정비사업“을 비롯한 공약사업 7건, 시책사업 2건에 대해서는 정상적으로 추진되고 있으나,

❍ 시책사업인“늘비 축구테마거리 조성사업”은 생초지구 풍수해생활권 종합정비사업과 일부 사업 대상지 중복구간이 발생하여 사업추진에 애로사항이 있으며 미 중복구간에 대한 사업을 우선 시행할 예정임

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	9	5	3	-	-
군수공약사업	7	5	2	-	-
주요시책사업	2	-	2	-	-

□ 주요성과

❍“곽종석 생가 정비사업”은 특교 10억원, 군비 10억원, 특교(공모) 1억원도비(공모) 2억원을 확보하여 실시설계를 완료하여 현재 2021년 6월 사업 완료 되었으며, 한옥체험관 건립은 2021년 9월말 사업 완료 예정임.

❍“남사예담촌 재정비사업”은 균특회계 예산으로 한옥담장 및 노후한옥정비 사업은 완료하였으며, 주변 환경정비를 위한 부지 4필지는 매입하여 축사 및 판넬 건물을 철거를 하였음.

❍“황매산 관광 및 경제활성화 사업”은 국도비 및 군비예산 25억원을 확보 하여 황매산 오토캠핑장을 준공하여 현재 운영 중에 있음.

❍“삼장체육공원 확충”사업 중 시설개보수사업은 완료하였으며, 샤워실 신축공사는 2019년 12월말 완료하였음.

❍“문익점 생가건립사업”은 사업대상지가 일부 변경되어 공유재산관리계획(투자심사)변경승인을 받았으며, 현재 사업대상부지 4필지에 대해 매입 및 협의 완료하고, 공사 착공하여 2022년에 준공할 예정임.

❍“단계한옥마을 관광자원개발사업”은 재정투자심사 승인을 받았으며, 2020년 시도자율편성 8억원을 확보하여 단계시장 저잣거리조성 사업은 완료하였음

□ 향후 추진계획

❍ 완료 되지 않은 사업 5건 중 국도비 사업 5건은 2021년 예산을 확보하여 정상 추진 중에 있으며, 2022년도 관광자원개발사업 균특예산을 확보하기 위하여 노력 중에 있음.

- 곽종석 생가 정비사업(국도비) : 2021년 9월중 완료예정

- 문익점 생가건립사업(국도비) : 2022년 하반기 완료예정

- 단계한옥마을 관광자원개발사업(국도비) : 2022년 하반기 완료예정

- 중산관광지 활성화 사업(국도비) : 2022년 하반기 완료예정

❍ 시책사업인 늘비 축구테마거리 조성사업은 안전건설과와 협의를 통해 사업   추진예정임

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	100%(완료)

56

곽종석 생가 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019년 1월 ~ 2021년 12월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 1340번지외 1필지

❍ 소요예산 : 3,450백만원(특교 1,100, 도비 200, 군비 2,150)

❍ 사업내용 : 체험관 및 생가건립 360㎡, 주차장 및 테마공원 1식

□ 추진사항

❍ 2018. 11월 : 중기지방재정계획 반영

❍ 2019. 02월 : 지방재정투자심사 승인

❍ 2019. 03월 : 공유재산관리계획 승인

❍ 2019. 06월 : 부지매입완료(5,406㎡)

❍ 2019. 04월 ~ 11월 : 실시설계 (건축, 토목, 조경 등)

❍ 2019. 11월 ~ 2020. 05월  : 실시설계완료(도 문화재현상변경신청 협의완료)

❍ 2020. 12월 : 곽종석 생가 정비사업 착공

❍ 2021. 03월 : 남사예담촌 한옥체험관 건립공사 착공

❍ 2021. 06월 : 곽종석 생가 정비사업 준공

※ 군수님 공약사항은 완료하였지만 추가 재정비사업은 계속진행 예정

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,450	2,450	1,000
국비	1,100	1,100				특교
도비	200	200
군비	2,150	1,150	1,000
기타

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 09월  : 남사예담촌 한옥체험관 건립공사 준공

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	100%(완료)

57

남사예담촌 재정비

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 01월 ~ 2019. 12월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 남사리(사월리) 남사예담촌 일원

❍ 소요예산 : 2,800백만원

❍ 사업내용 : 토석담장 복원(L=700m), 노후한옥정비(47동), 기산국악당

주변 및 남사예담촌 부지매입 4필지

□ 추진사항

❍ 2019. 06월 : 노후한옥정비 47동 완료

❍ 2019. 10월 : 토석담장(L=700m) 복원정비 완료,

❍ 2019. 10월 : 남사예담촌 부지매입 4필지 완료(축사, 판넬건물 등)

※ 군수님 공약사항은 완료하였지만 추가 재정비사업은 계속진행 예정

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,800	2,800
국비	1,400	1,400
도비	420	420
군비	980	980
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 부지 추가매입 애로 : 남사마을 추진위와 주민복지과와 공동으로 보상협의 진행(유림독립기념관 진입도로, 주차장 및 기산국악당 주변 노후주택)

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 09월 ~ : 사양정사 주차장 조성사업 시행

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	100%(완료)

58

황매산 관광 및 경제활성화 사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 01월 ~ 2020. 06월

❍ 위    치 : 산청군 차황면 법평리 1-10번지 일원

❍ 소요예산 : 2,500백만원

❍ 사업내용 : 오토캠핑장, 관리사, 오수 및 상하수도, 안전시설, 별빛쉼터 조성 등

□ 추진사항

❍ 2018. 07월 : 실시설계완료

❍ 2019. 02월 : 각종인허가 완료

❍ 2019. 04월 ~ 2020. 06월 : 공사 착공 및 준공

❍ 2020. 07월 : 황매산 오토캠핑장 개장(차황면 청년회 위탁 운영)

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	2,500	2,500
국비	1,250	1,250				균특
도비	375	375
군비	875	875
기타

□ 향후 추진계획

❍ 완료

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	100%(완료)

59

삼장체육공원 확충사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 01월 ~ 2019. 12월

❍ 위    치 : 산청군 삼장면 덕교리 830번지 일원

❍ 소요예산 : 290백만원(군비 290)

❍ 사업내용 : 편의시설(샤워장) 설치, 다목적캠핑장 데크 설치, 시설개보수 등

□ 추진사항

❍ 2018. 12월 : 삼장면 체육회 및 마을주민 의견 청취

❍ 2019. 02월 ~ 08월 : 군계획시설 변경

❍ 2019. 01월 ~ 09월 : 실시설계 용역

❍ 2019.12월 : 건축(샤워장) 준공 및 데크설치, 시설개보수 완료

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	290	290
국비
도비
군비	290	290
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 해당사항 없음

□ 향후 추진계획

❍ 완료

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광시설담당)
추진진도(%)	100%(완료)

60

생초국제조각공원 구역 확장

□ 사업개요

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 사 업 비 : 588백만원

❍ 사 업 량 : 꽃잔디 식재 및 편의시설 설치 1식, 화장실 설치 1식

❍ 사업내용

- 꽃잔디 추가식재, 조각공원내 편의시설 설치(그늘막, 안내판 등)

- 고분군 주변 잡목제거, 안전휀스 및 화장실 설치 등

□ 추진사항

❍ 2019. 1~12월 : 꽃잔디 추가식재 완료(제방 1,400㎡, 조각공원 15,000㎡)

조각공원 내 보안등 및 안내판 설치 완료

고군분 주변 잡목제거 완료(10,000㎡)

❍ 2020. 1~12월 : 안전휀스 설치(L=100, H=1.2m), 꽃잔디 추가식재 및

잡초제거 완료(3,000㎡), 화장실 설치(33.83㎥)

❍ 2021. 1~ 6월 : 꽃잔디 추가식재 및 잡초제거 완료(2,000㎡)

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	588	388	200
국비
도비
군비	588	388	200
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 없음

□ 향후 추진계획

❍ 공원 내 꽃잔디 추가식재 및 잡초제거 등 지속적인 유지관리

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	10%(정상추진)

61

문익점 생가건립사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2019. 03월~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 단성면 사월리 477-1번지

❍ 소요예산 : 3,565백만원

❍ 사업내용 : 목화체험관(문익점생가포함), 목화테마거리, 목화프로그램 등

□ 추진사항

❍ 2018. 07월 : 사업타당성 및 기본계획

❍ 2018. 11월 : 지방재정투자심사 및 공유재산 관리계획 승인

❍ 2020. 01월 ~ 08월 : 목화테마거리 실시설계용역 시행

❍ 2020. 10월 : 문화재 현상변경 조건부 허가(목화테마거리 조성)

❍ 2021. 04월 : 목화테마거리 조성공사 착공

❍ 2021. 05월 : 목화체험관 기반시설 조성공사 실시설계용역 시행

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,565	1,665	490	1,410
균특	1,350	400	245	705
도비	405	120	73.5	211.5
군비	1,810	1,145	171.5	493.5
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 부지매입 협의 애로 : 지속적 협의를 통한 사업의 필요성 설명

❍ 문화재보호구역으로 현상변경허가 장기간 소요 : 사업당위성 설명

❍ 시도자율편성 확보 : 2022년 계속사업으로 신청예정

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 02월 ~ 09월 : 부지매입 협의

❍ 2021. 09월 ~ 2022. 12월 : 목화체험관 관련 사업 착공 및 준공

구 분	공약사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	40%(정상추진)

62

단계한옥마을 관광자원 개발사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 01월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 신등면 단계리 일원

❍ 소요예산 : 3,000백만원

❍ 사업내용 : 토석담장 복원(L=300m), 저잣거리 조성, 한옥 홍보관 건립

⇒ 문화재담당에서 문화재보수(토석담장 복원 및 한옥주택 보수 완료)

□ 추진사항

❍ 2019. 02월 : 단계한옥마을 기본계획 완료

❍ 2019. 02월 : 지방재정투자심사 승인

❍ 2020. 08월 : 저잣거리조성사업 건축설계 용역 완료

❍ 2020. 10월 : 저잣거리조성사업 착공

❍ 2021. 05월 : 저잣거리조성사업 준공

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	3,000	800	800	1,400
국비	1,500	400	400	700
도비	450	120	120	210
군비	1,050	280	280	490
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 문화재보호구역으로 현상변경허가 장기간 소요 : 사업당위성 설명

※ 이충무공 유적지 주변(자체사업) 부지매입 애로 : 지속적 협의를       통한 사업의 필요성 설명

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 04월 : 단계한옥마을 전통놀이마당 조성공사 실시설계용역 시행

구 분	주요시책사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	20%

63

중산관광지 활성화 사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020. 01월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 시천면 중산리 중산관광지 일원

❍ 소요예산 : 4,600백만원

❍ 사업내용 : 물소리길(생태탐방로), 물소리 빛광장, 힐링산책로, 하늘정원

경관개선사업 등

□ 추진사항

❍ 2018. 07월 : 중산관광지 활성화 기본계획(타당성)용역 완료

❍ 2019. 02월 : 지방재정투자심사 승인

❍ 2019. 02월 ~ 2020. 02월 : 중산관광지 조성계획(변경)용역

❍ 2020. 04월 : 실시설계용역 완료(지리산 두류 생태탐방로 조성사업)

❍ 2020. 10월 : 지리산 두류 생태탐방로 조성사업 착공

❍ 2021. 05월 : 중산관광지 물소리 빛광장 조성사업 실시설계용역 완료

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	4,600	800	800	1,500	1,500
균특	2,300	400	400	750	750
도비	690	120	120	225	225
군비	1,610	280	280	525	525
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 물소리 빛광장 일부 부지매입 애로

⇒ 지역주민과 협의하여 사업의 타당성 설명 및 협조 예정

□ 향후 추진계획

❍ 2021년 07월 : 중산관광지 물소리 빛광장 조성사업 착공

❍ 2021년 08월 : 지리산 두류 생태탐방로 조성사업 준공

구 분	주요시책사업
담당부서	관광진흥과(관광개발담당)
추진진도(%)	- %

64

늘비 축구테마거리 조성사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2021. 01월 ~ 2023. 12월

❍ 위    치 : 산청군 생초면 어서리 일원

❍ 소요예산 : 4,000백만원

❍ 사업내용 : 축구테마거리 L=92m, 유스호스텔 및 체험관 리모델링 1식

축구전시관 840㎡, 주차장 조성 1식 등

□ 추진사항

❍ 2020. 03월 : 기본계획 및 타당성 조사 용역완료

❍ 2020. 04월 : 지방재정투자심사 승인

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	4,000		730	1,500	1,770
균특	2,000		365	750	885
도비	600		109.5	225	265.5
군비	1,400		255.5	525	619.5
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 생초지구 풍수해생활권 종합정비사업과 일부 사업 대상지 중복구간       발생에 따른 사업추진애로

⇒ 미 중복구간에 대한 사업 우선시행 및 중복되는 부분에 대해서는 안전건설과와 협의를 통해 사업추진

□ 향후 추진계획

❍ 2021년 07월 : 실시설계용역 시행(테마거리 미 중복구간 등)