2021년 상반기 군정 주요업무 평가결과

(상하수도과)

□ 총    평

❍ 소규모수도시설개량 및 지방상수도 급수구역 확장을 통하여 미급수지역의 수질불량, 원수부족 등으로 인한 주민 불편을 해소하고 안심하고 마실수 있는 수돗물 공급으로 주민복지 증진 기여

❍ 공공수역의 수질오염 방지와 도시환경 및 주민보건 위생 개선에 기여하고자 함.

□ 추진상황

구 분	추진실적(건)					비 고
	계	완료	정상추진	부진	장기추진
계	4	1	3
군수공약사업	3	1	2
주요시책사업	1		1

□ 주요성과(공모사업 등)

❍ 지방상수도 시설 확장 및 개량으로 지역주민에게 깨끗하고 안정적인 수돗물을 공급하여 행정 신뢰도 향상

❍ 공공수역의 수질오염 방지와 도시환경 및 주민보건 위생 개선에 기여하고자 함.

□ 반    성

❍ 생비량지구 지방상수도 인입공사가 준공되었으나, 단성정수장의 정수량 부족으로 생비량면 전역 지방상수도 공급이 어려우나, 조속히 단성정수장 증설을 완료하여 지방상수도 공급에 차질이 없도록 조치.

❍ 하수도정비기본계획 변경으로 사업 확정 및 예산확보가 다소 지연되었으나 예산확보 및 공사 추진에 차질이 없도록 조치.

□ 향후 추진계획

❍ 지방상하수도 확장을 위한 미확보 또는 부족 재원 확보를 위해 경남도 및 중앙부처와 지속적인 협의로 예산 확보 노력

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	45%(정상추진)

76

지방상수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2018. 1월 ~ 2023. 12월

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 50,260백만원(국7,404/ 도27,777/ 군15,079)

❍ 사업내용 : 산청, 단성, 시천 급수구역 확장

- 정수장 증설(단성, 시천), 배수지 설치(오부, 삼장)

- 관로매설 L=120km, 가압장 및 감압변 설치 1식

□ 추진사항

❍ 2017. 05월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 착수

❍ 2018. 11월 : 시천 급수구역 확장사업(1지구) 부분 준공(삼장면 신촌 ~ 대포)

❍ 2019. 02월 : 산청군 수도정비기본계획(변경) 수립

❍ 2019. 05월 : 단성취수장(집수매거) 하천점용 등 인·허가 및 공사 착공

❍ 2019. 10월 : 산청 및 단성 급수구역 실시설계 용역 준공

❍ 2019. 12월 : 시천급수구역(삼장면 대포 ~ 홍계) 총사업비 변경 승인

❍ 2020. 02월 : 삼장지구 지방상수도 인입공사(2지구) 착공

❍ 2020. 03월 : 산청급수구역 지방상수도 확장사업(오부지구) 착공

❍ 2020. 06월 : 단성정수장 증설 및 지방상수도 확장사업 착공

❍ 2020. 09월 : 산청급수구역 지방상수도 확장사업(금서지구) 착공

□ 연차별 사업예산                                     (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	50,260	16,722	17,142	10,106	6,290
국비	7,404	7,404
도비	29,278	4,300	12,075	7,556	5,347
군비	13,578	5,018	5,067	2,550	943
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 수도정비기본계획 변경 수립 지연으로 지방상수도 확장사업이 다소 지연되었으나, 2019년 2월 환경부 최종 승인으로 급수 구역별 예산확보 및 공사 추진

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 02월 : 시천급수구역 지방상수도 확장사업 실시설계용역 착수

❍ 2021. 12월 : 단성정수장 증설 준공예정

❍ 2021. 12월 : 생비량지구 지방상수도 전체 공급 예정

❍ 2022. 03월 : 시천급수구역 지방상수도 확장사업 착공

❍ 2022. 09월 : 산청급수구역 지방상수도 확장사업 준공예정

❍ 2022. 12월 : 단성급수구역 지방상수도 확장사업 준공예정

❍ 2023. 12월 : 시천급수구역 지방상수도 확장사업 준공예정

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	100%(완료)

77

지방상수도 인입공사 조기 마무리(생비량지구)

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2015. 1월 ~ 2019.12월

❍ 위    치 : 산청군 생비량면 일원

❍ 소요예산 : 14,951백만원(국9,766/ 군5,185)

❍ 사업내용 : 생비량면 지방상수도 급수구역 확장

- 배수지(300톤) 1식, 관로매설 77.1㎞, 관로매설 구간 포장 1식

- 가압장 4개소, 전기 및 제어설비 1식

□ 추진사항

❍ 2015. 12월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 착공(총괄분)

❍ 2018. 10월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 준공(1,2,3차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 기성(4차분)

❍ 2019. 04월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 포기(시공사 영일개발)

❍ 2019. 05월 ~ 09월 : 생비량면 지방상수도 인입공사 타절 정산

❍ 2019. 10월 : 생비량면 지방상수도 인입공사(잔여분) 착공

❍ 2020. 04월 : 생비량지구 지방상수도 인입공사 준공

□ 연차별 사업예산                                     (단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	14,951	14,951
국비	9,766	9,766
도비
군비	5,185	5,185
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 당초 시공사 업체부도로 공사가 다소 지연되었으나 타절준공이후 잔여분 공사 발주로 계획공정 만회

❍ 단성정수장 공급수량 부족으로 생비량지구 공사 완료시 전지역 상수공급이 어려우나, 수량부족 및 수질불량 지역을 선정하여 우선적으로 공급하고, 단성정수장 증설을 조속히 추진하여 공급

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12월 : 생비량지구 지방상수도 전제 공급 예정

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(하수도담당)
추진진도(%)	20%(정상추진)

78

공공 하수도 수혜지역 확장

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2020년 ~ 2022년

❍ 위    치 : 산청읍 모고리, 차황면 상법리, 시천면 사리, 단성면 방목리

❍ 소요예산 : 27,504백만원(국비 19,254백만원, 지방비 8,250백만원)

❍ 사업내용 : 하수처리시설 신ㆍ증설 및 하수관로 매설, 배수 설비 등

□ 추진사항

❍ 2019. 02월 : 산청군 하수도 기본계획(변경) 승인

❍ 2020. 08월 : 모고지구 하수관로 정비사업 착공

❍ 2020. 08월 : 상법지구 공공하수도 정비사업 착공

❍ 2020. 10월 : 석대지구, 시천지구 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2021. 04월 : 노은지구 기본 및 실시설계용역 착수

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2020년 )	‘21	‘22년	‘23년 이후	비고
계	27,504	3,021	8,694	15,789	-
국비	19,254	2,020	6,248	10,986	-
도비	1,170	218.5	424	527.5	-
군비	1,969	782.5	695.7	490.8	-
기타	5,111	-	1,326.3	3,784.7	-	기금

□ 문제점 및 대책

❍ 2021년도 하수도분야 미확보 예산(환경부) 재신청 (대포,덕교,모례,월평지구)

▶ 산청군 하수도정비 기본계획(변경) 2단계 사업 (2021년 ~ 2025년)

❍ 2022년 예산확보를 위한 실시설계 발주 및 마무리

❍ 예산확보를 위한 중앙부처 및 국회방문 협의 등

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 02월 : 노은지구 공공하수도 증설사업 실시설계용역 착수

❍ 2021. 10월 : 석대지구, 시천지구 하수도사업 설치인가 및 재원협의

❍ 2022. 02월 : 석대지구, 시천지구 하수도사업 착공

❍ 2022. 12월 : 모고지구, 상법지구 하수도사업 준공 예정

구 분	공약사업
담당부서	상하수도과(상수도담당)
추진진도(%)	80%(정상추진)

79

노후 상수관망 정비사업

□ 사업개요

❍ 사업기간 : 2016. 10월 ~ 2022. 12월

❍ 위    치 : 산청군 일원

❍ 소요예산 : 25,097백만원(국 12,548, 지 12,549)

❍ 사업내용 : 지방상수도 노후 관망정비 및 현대화 사업

- 관망정비 L=35.0km, 누수탐사·정비 L=557km

- 블록시스템(중블록 5개소, 소블록 16개소) 및 유지관리시스템 구축 등

□ 추진사항

❍ 2016. 10월 : 위·수탁 협약체결(산청군-한국환경공단)

❍ 2017. 09월 : 기본설계 용역 준공

❍ 2017. 11월 : 실시설계 및 관망관리 용역 착공

❍ 2018. 06월 : 블록시스템 구축공사 착공

❍ 2018. 12월 : 유지관리시스템 구축공사 착공

❍ 2019. 10월 : 블록시스템 구축공사 준공

❍ 2019. 12월 : 노후 상수관망 정비사업 착공

❍ 2020. ~12월 : 관망정비(계획36.1km/시행12km), 계량기교체 및 옥외이설(계획3,466/시행400), 유지관리시스템구축(계획1.0/시행0.4)

□ 연차별 사업예산

(단위:백만원)

구분	총사업비	기 확보예산 ( ~2019년 )	‘21년	‘22년	‘23년 이후	비고
계	25,097	20,218	4,879
국비	12,548	10,109	2,439
도비	159	159
군비	12,390	9,950	2,440
기타

□ 문제점 및 대책

❍ 기존 노후관망 정비를 위한 지역이 소재지 권역에 집중되어 주택가 주변으로 굴착 및 소음 등으로 인한 지역주민의 불편사항이 발생하고 있으나, 현장여건을 잘 고려하여 신호수 및 부직포 시공 등으로 불편사항을 최소화

□ 향후 추진계획

❍ 2021. 12월 : 노후상수관망 정비사업 준공

❍ 2022. 01월 : 관망정비 성과보증

❍ 2022. 12월 : 유수율 사업 판정, 최종준공